물레방아골 함양

새로운 시작 희망찬 함양

산삼․산약초의 고장 함양

천년의 숲 희망의 땅

지역개발사업단

55. 함양 지리산 케이블카 설치 ---- 97 56. 본백~용평간 4차로 확․포장공사 --- 98

함양 지리산 케이블카 설치

55

❍ 조망과 경제성이 뛰어난 곳에 케이블카 설치를 통한 지리산

관광자원의 지속 가능한 보전과 효율적 이용

❍ 신체적 불편을 넘어선 폭넓고 수려한 자연경관 감상 및 탐방

기회 제공과 관광인프라 확충을 통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

구 분	선정노선 및 거리	사업비	사업기간	비 고 (유치 추진기간)
지리산 함양케이블카 유치사업	백무동주차장 ~ 장터목대피소 하단 4.1km	240억원	2013~2015년	1~6월

□ 그간 추진사항

❍ 국립공원계획변경 신청서 환경부 제출 : 2011. 9. 30

❍ 국립공원위원회 케이블카 설치 검토대상 함양군 포함 결정    : 2011. 12. 21

❍ 함양지리산케이블카추진위원회 발대식 : 2012. 1. 17

❍ 케이블카 설치 시범대상 선정 기준방침에 따른 경제성 검토   서류 제출(KEI) : 2012. 1. 27

□ 추진계획

❍ 환경부 검토기준에 의한 신청서 보완 제출 : 2012. 3. 23

❍ 시민단체 의견수렴 : 2012. 4월(환경부, 지자체 합동공청회)

❍ 민간전문위원 및 국립공원위원회 심사 : 2012. 5월

❍ 사업대상지 확정 : 2012. 6월

✍ 지역개발사업단 개발계획담당 (☎ 960-5221)

본백～용평간 4차로 확․포장공사

56

❍ 개발촉진지구내 주도로이며 고속도로와 접속되는 우리군의 관문

도로를 선형개량 및 확․포장하여 증가되는 교통량에 적극 대처

❍ 민간투자를 유도하여 낙후된 함양의 발전기반을 구축하고 지역

개발 사업을 효율적으로 시행하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 ～ 백천리

❍ 사 업 량 : 도로 확ㆍ포장 L=2.9㎞, B=20～30m

❍ 사업기간 : 2009. 3. 2. ～ 2012. 12. 31.

❍ 사 업 비 : 28,000백만원(공사비 18,664, 보상비 9,336)

❍ 시 행 사 : (주)에이원건설

□ 그간추진상황

❍ 관련부서 협의완료 및 편입토지 보상

❍ 개발촉진지구 국가지원사업 개발계획 실시계획승인 : 2008. 01. 07

❍ 문화재 발굴조사 완료 : 2009. 12

❍ 1~2차분(13,000백만원) 준공 : 2011. 05. 07.

□ 추진계획

❍ 4차분(2012년도 854백만원) 계약 및 착공 : 2012. 2월

❍ 3차분(2011년도 6,980백만원) 준공 : 2012. 05. 31.

❍ 주차장～함양IC입구까지 2012년 5월말까지 준공계획

❍ 2012년 12월말 총괄준공하여 지역경제 활성화에 기여

✍ 지역개발사업단 개발사업담당  (☎ 960-5222)