문화관광과

29. 천년의 숲에서 느끼는 힐링 제52회 함양물레방아골축제 ----- 3 30. 도시공원 예술로 사업 -------- 4 31. 상림 보도교 설치사업 -------- 5 32. 국민체육센터(수영장) 건립 ---- 6

- 천년의 숲에서 느끼는 힐링-

29

제52회 함양물레방아골축제

❍ 지역 문화예술단체 등의 참여 기회제공으로 문화예술의 저변

확대 및 창작 활동을 위한 모티브 제공

□ 전통문화예술 축제 개최를 통한 군민의 화합, 보고 누리는 관광,

농특산물 홍보판매로 군의 브랜드가치 향상과 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013년 9월 ～ 10월(중 3일간)

❍ 위    치 : 상림공원 일원

❍ 사 업 비 : 250백만원

❍ 사업내용

- 고유제, 개막공연, 문예행사(경연, 전시, 공연 등), 체험행사

- 농산물엑스포, 농특산물 홍보 및 판매 등

□ 추진계획

❍ 축제를 통한 문화예술 발전과 군민 화합 도모

❍ 축제를 통한 지역이미지 향상 및 관광자원화

❍ 농특산물 홍보 및 판매로 지역경제 활성화에 기여

❍ 주요일정

- 축제위원회 개최 : 연 2～3회

- 축제세부계획 수립 : 2013. 6월

- 축제의 적극적 홍보 : 2013. 7월 ～ 8월

- 축제 준비 및 평가 보고회 개최 : 2013. 9월 ～ 10월

✍ 문화관광과 문화예술담당 (☎ 960-5161)

도시공원 예술로 사업

30

❍ 한국문화예술위원회에서 공모 선정한 공공미술 시범사업임

❍ 도시공원을 통한 군민의 일상생활 속의 예술향유의 공간 창조

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013년 1월 ～ 12월

❍ 위    치 : 상림공원 주변, 고운광장

❍ 사업내용 : 예술작품 기획 및 설치

❍ 사업비 : 400백만원(기금 200, 군비 200)

□ 그간 추진상황

❍ 2012. 7월 : 장소공모 선정(전국 5개소)

❍ 2012. 8월 : 위원회 현장 방문 및 워크숍

❍ 2012. 9월 ～ 11월 : 기획자 선정 및 기획안 구성

❍ 2012. 12월 : 사업 추진을 위한 협약체결

□ 추진계획

❍ 2013. 3월 ～ 4월 : 기획안 설명회 개최

❍ 2013. 5월 : 최종 기획안 확정

❍ 2013. 6월 ～ 12월 : 미술작품 설치 및 프로그램 진행

✍ 문화관광과 문화예술담당 (☎ 960-5161)

상림 보도교 설치 사업

31

❍ 상림공원 주변을 정비하여 관광시설 인프라 확충으로 관광객의

볼거리 제공으로 지역경제 활성화 및 관광시너지 효과 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 운림리 일원

❍ 사업기간 : 2012년 2월 ～ 2013년 9월(18개월)

❍ 사업내용

- 보도교설치 L=90m, B=4.0m

- 데크설치   L=199m, B=1.2~4.0m

❍ 사업비 : 3,000백만원(1차년 2,000, 2차분 1,000)

□ 그간 추진상황

❍ 2011년 3～12월 : 상림보도교 설치 실시설계

❍ 2011년 5～12월 : 문화재청 현상변경 협의

❍ 2012년 1월 : 경상남도 계약심사

❍ 2012년 4월 : 공사 착공

❍ 2012년 12월 : 교대 및 교각 기반 완료

□ 추진계획

❍ 2013. 1～5월 : 공사 2차분 착공

❍ 2013. 5월 : 아름다운 교량 명칭 공모

※ 명칭 명명을 위한 설문조사 실시

❍ 2013. 6월 : 교량 준공

✍ 문화관광과 관광담당(☎ 960-5163)

국민체육센터(수영장) 건립

32

❍ 생활체육 인구의 급속한 증가로 실내체육시설의 확충 불가피

❍ 소규모 복합 실내 체육시설을 통하여 군민 누구나 생활체육

활동을 할 수 있는 여건조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 함양읍 백연리 생활체육공원 내

❍ 사업기간 : 2011년 ～ 2013년

❍ 규    모 : 연면적 2,714.19㎡(지상 2층, 지하 1층)

❍ 사 업 비 : 6,500백만원(기금 3,200, 군비 3,300)

❍ 사업내용 : 수영장(25m×6레인), 다목적체육실, 체력측정실 등

□ 그간 추진상황

❍ 군유재산 관리계획 승인 : 2009년 3월

❍ 지방재정 투융자 심사 및 중기지방 재정계획 : 2009년 3월

❍ 문화체육관광부 사업계획(수영장 기본형) 변경 승인 : 2010년 11월

❍ 기본 및 실시설계 용역 : 2011년 5월 ～ 9월

❍ 1차분 공사 발주 : 2011년 12월

❍ 현재 골조공사 완료 : 2013년 2월

□ 추진계획

❍ 방수 공사 및 조적 공사 : 2013. 3월

❍ 외벽, 창호, 유리, 타일, 수장 등 : 2013. 9월

❍ 부대 토목공사 : 2013. 10월

❍ 공사 준공 예정 : 2013. 12월말

✍ 문화관광과 체육진흥담당(☎ 960-5164)