41. 주민건의(숙원)사업 ------------ 3 42. 도로망확충사업 --------------- 4 43. 권역단위 종합정비사업 --------- 5 44. 대중교통체계 선진화를 위한 인프라 구축 -- 7

건설교통과

주민숙원(건의)사업

41

❍ 주민생활과 영농에 불편이 많았던 농로개설 확․포장, 안길포장,

진입로정비, 소교량가설, 용․배수로정비 등 각종사업으로 주민의 숙원을 해소해 줌으로써 농촌지역의 생활환경개선 및 소득기반 확충으로 정주의욕 고취

□ 사업개요

❍ 연차별 투자내역                             (단위:건/백만원)

계		2011년		2012년		2013계획
건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
454	19,010	174	9,410	164	6,150	116	3,450

❍ 2013년 세부사업 내역                       (단위:건/백만원)

계	주민숙원	소규모 주민숙원	재정건의	안전사고 예방사업
116/3,450	18/910	79/1,940	9/500	10/100

□ 추진계획

❍ 숙원사업에 대하여 사업의 효과 및 이용도 등 제반 여건

조사 후 우선순위에 따라 소요사업비 확정․시행

❍ 편입부지 희사승낙서 징구 및 이전등기 : 연중 시행

❍ 대상지 선정 : 2013. 2월 ～ 3월

❍ 실시설계 : 2013. 3월

❍ 사업시행 : 2013. 4월 ～ 11월

✍ 건설교통과 건설담당(☎ 960-5191)

도로망 확충 사업

42

❍ 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축 및 군민생활편익 증진

□ 사업개요

❍ 군도

- 24개 노선, L=193.8km, 224,293백만원

❍ 농어촌도로

- 303개 노선, L=754.2km,  680,631백만원

□ 그간추진상황                       (단위:km/백만원)

노선수	전체		기투자		2012 시행		2013 시행		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	947.5	904,924	398.16	307,618	7.3	3,174	4.7	3,030	537.34	591,102
군도	193.3	224,293	88.7	73,404	3.4	1,974	1.5	1,300	99.7	147,615
농어촌	754.2	680,631	309.46	234,214	3.9	1,200	3.2	1,730	437.64	443,487

□ 추진계획

❍ 사업내용(공사중 6건/준공계획 2건)

구분	사업명	위치	사업량 (km)	사업비(백만원)				비고
				계	기시행	2013년	장래
계	계		4.7	70,929	51,866	3,030	984,378
군도	본백~월평외 1건	함양읍외 2개면	1.5	50,835	39,183	1,300	-
농어촌	정개선외 3건	지곡면외 3개면	3.2	20,094	12,683	1,730	984,378

❍ 추진일정

- 실시설계 용역 및 설계보완 완료 : 2013. 1월～3월

- 토지보상 : 2013. 2월～ 4월

- 사업시행 : 2013. 2월～12월

✍ 건설교통과 도로담당  (☎ 960-5192)

권역단위 종합정비사업

43

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 시설의 확충

○ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 사업현황                                    (단위 : 백만원)

구 분	위 치	사 업 기 간	사 업 비				사업내용	비 고 (시행처)
			합계	기투자	2013년	’14년 이후
계	3개소		14,500	3,931	3,715	6,854
백현권역	백전면 경백리 오천리	2011 ～2014	7,129	3,568	2,478	1,083	기초생활기반확충외 3개사업	직영
오매실권역	백전면 구산리 대안리	2012 ～2015	3,132	363	672	2,097	기초생활기반확충외 3개사업	한국농어촌공사 위탁시행
봉전권역	서하면 봉전리	2013 ～2016	4,239		565	3,674	기초생활기반확충외 3개사업	한국농어촌공사 위탁시행

○ 사 업 량 : 권역단위 종합정비사업 3개소

○ 총사업비 : 14,500백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	’10년도	’11년도	’12년도	’13년도	’14년도	’15년 이후
계	14,500			1,427	2,504	3,715	3,751	3,103
국 비	10,056			999	1,753	2,617	2,593	2,094
도 비	1,279			128	226	313	333	279
군 비	3,006			300	525	785	778	618
기 타	159						47	112

□ 그간 추진실적

○ 백현권역 일반농산어촌개발사업 확정 : 2010. 5월

○ 오매실권역 일반농산어촌개발사업 확정 : 2011. 5월

○ 백현권역 기본계획 승인 : 2011. 10월

○ 백현권역 지역역량강화사업 용역 시행 : 2011. 12월

○ 백권권역 종합정비사업 1단계 시행(두레원 조성) : 2011. 12월

○ 봉전권역 일반농산어촌개발사업 확정 : 2012. 5월

○ 백현권역 시행계획 승인 : 2012. 5월

○ 백현권역 종합정비사업 1단계 준공(두레원 조성) : 2012. 7월

○ 백현권역 종합정비사업 2단계 시행 : 2012. 7월

○ 오매실권역 기본계획 승인 : 2012. 10월

○ 오매실권역 실시설계 용역 시행 : 2012. 12월

○ 봉전권역 기본계획 용역 시행 : 2013. 2월

□ 향후 계획

○ 오매실권역 시행계획 승인 : 2013. 6월

○ 오매실권역 종합정비사업 착수 : 2013. 6월

○ 백현권역(대평두레원) 운영 : 2013. 6월

○ 백현권역 지역역량강화사업 용역 시행 : 2013. 9월

○ 봉전권역 기본계획 승인 : 2013. 10월

○ 봉전권역 실시설계 용역 시행 : 2013. 10월

✍ 건설교통과 농업기반담당(☎ 960-5193)

대중교통체계 선진화를 위한 인프라 구축

44

❍ 이용자 중심의 교통행정 시책 추진으로 교통편익 증진

❍ 체계적인 교통운영방안 개선으로 대중교통의 편리성 향상

❍ 경영개선과 군민 서비스 확대를 위한 운수업체 재정 지원

❍ 교통약자 및 오지(벽지)주민들의 대중교통수단 이용 보장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 1월 ～ 2013. 12월(연중)

❍ 사 업 량

- 대중교통시설 개선 및 군 이미지 홍보

☞ 버스승강장 설치사업 외 4개사업/221백만원

- 주민편의 교통안전시설물 설치 및 관리

☞ 교통안전시설물 설치 및 정비 외 3개사업/78백만원

- 운수업체 재정지원

☞ 벽지노선 손실보상금지원 외 2개사업/2,346백만원

- 안의시외버스터미널 운영비 지원 12백만원

- 특별교통수단(콜택시) 운영 : 2대/60백만원

- 특별교통수단(콜택시) 구입 : 2대/76백만원

❍ 사 업 비 : 2,793백만원

□ 추진계획

❍ 계획수립 및 사업대상지 확정 : 2013. 2월한

❍ 실시설계 : 2013. 2월～4월

❍ 사업시행 및 완료 : 2013. 3월～12월

✍ 건설교통과 교통행정담당 (☎ 960-5194)