지역발전과

55. 대남전원주택 조성사업 --------- 3 56. 국지도37호선 우회도로 확․포장공사 -- 4

대남전원주택 조성사업

55

❍ 함양리조트사업과 연계하여 전원 주택지를 조성함으로서 품격 높은
레포츠 연계형 전원마을을 조성하여 인구유입 및 지역발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 서상면 대남리 492-1번지 일원

❍ 면    적 : 38,103㎡(11,526평)

❍ 사업기간 : 2009 ~ 2013년(당초 2012년)

❍ 사 업 비 : 2,442백만원(민자유치)

❍ 시 행 자 : 주식회사 다온(대표 민세식)

❍ 주요시설 : 단독주택(27세대), 주차장, 도로, 소공원

□ 그간추진상황

❍ 개발계획 수립 고시 : 2009. 3. 24.

❍ 실시계획 승인 : 2010. 6. 28.

❍ 실시계획 변경승인 : 2011. 8. 24.

❍ 개발계획 변경고시 : 2012. 7. 4.

□ 추진계획

❍ 토지보상협의 및 토지수용 : 2013. 2월중 완료예정

❍ 준공 : 2013. 상반기

❍ 분양 : 2013. 하반기

□ 향후계획

❍ 금년 준공예정으로, 레포츠 연계형 전원주택단지를 조성하여
품격 높은 주거 공간 형성을 통해 인구 유입 및 지역발전 기여

✍ 지역발전과 지역계획담당(☎ 960-5221)

국지도 37호선 우회도로  확․포장공사

56

❍ 함양개발촉진지구내 도로를 정비․확충하여 교통서비스 수준의        질적향상을 통한 생활환경개선

❍ 국립공원인 덕유산 주변 관광도로를 구축하여 지역경제활성화

및 지역발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서상면 상남리 일원

❍ 사 업 량 : 도로 확․포장공사 L=1.2km, B=10m

❍ 사업기간 : 2012. 12. 04 ~ 2013. 12. 31

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(광특회계 국비 100%)

❍ 시 행 사 : 우람종합건설(주)

□ 그간추진상황

❍ 실시설계 : 2008. 05. 09. ~ 2009. 04. 11

❍ 실시계획 승인 : 2012년 12월 5일

❍ 1차분(2012년도 1,287백만원) 계약 및 착공 : 2012. 12. 04

□ 추진계획

❍ 1차분(2012년도 1,287백만원) 준공 : 2013. 09. 29

❍ 2차분(2013년도 2,750백만원) 계약 및 착공 : 2013. 2월(2013년 준공목표)

❍ 2차분 편입부지 보상 : 2013. 02 20 ~ 2013. 05. 30

❍ 2차분 사업추진 및 준공 : 2013. 12. 31

✍ 지역발전과 지역사업담당(☎ 960-5222)