부서		문화관광과
시책별가중치		시책 번호	담당	시책명	사업비	가중치
			계		14,260	1
		27	문화예술	고운 최치원선생 역사공원 조성	5,052
		28	문화재	지정문화재 보수 정비사업	1,785
		29	관광기획	전략적 관광객 유치	123
		30	관광시설	농월정 복원	800
		31	체육진흥	함양국민체육센터(수영장) 운영	6,500

시책번호	27	분야	찾고싶은 문화관광		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	문화관광과		담 당	문화예술	전화번호	960-5161
시 책 명	고운 최치원선생 역사공원 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 지내(고운광장 뒤편)

❍ 사 업 량 : 부지면적 18,521㎡, 건축면적 148.68㎡, 진입도로 L=256m

❍ 사업내용 : 기념관, 역사사료관, 화장실, 광장 등

❍ 사 업 비 : 5,052백만원(국비 1,450, 도비 435, 군비 3,167)

┏ 공  사  비 : 3,478백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 30%, 증 578)

┗ 부지매입비 : 1,574백만원

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2015년

□ 추진계획

❍ 2014.  3월 : 슬레이트, 수목 등 지장물 철거 및 폐기물 처리

❍ 2014.  6월 : 지반조성 완료

❍ 2014.  7월 : 진입도로, 토목, 건축물, 기계설비, 전기공사 등 착공

❍ 2014. 12월 : 진입도로 준공

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
지장물 철거	4종		10%
지반 조성	18,521㎡		40%
공종별 공사 착공	7종		30%
진입도로 개설	L=256m B=6.0m		20%

시책번호	28	분야	찾고싶은 문화관광		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	문화관광과		담 당	문화재	전화번호	960-5162
시 책 명	지정 문화재 보수정비사업

□ 사업개요

❍ 대 상 : 지정문화재 18개소(국가 8, 지방 10), 전통사찰 1개소

계		국가		지방		전통사찰
건수	사업비 (백만원)	건수	사업비 (백만원)	건수	사업비 (백만원)	건수	사업비 (백만원)
19	1,785	8	1,025	10	660	1	100

- 국가 : 거연정, 황석산성, 승안사지 삼층석탑, 법인사 목조아미타 여래좌상,

상림, 목현리 구송, 학사루 느티나무, 운곡리 은행나무

- 지방 : 광풍루, 함양향교, 청계서원, 송호서원, 거연정, 노참판댁고가,

우명리정씨고가, 오담고택, 팔령산성 기본계획, 개평리소나무.

- 전통사찰 : 상연대

□ 추진계획

❍ 2014.  2월 ~ 4월 : 보수공사 실시설계 시행

❍ 2014.  5월 : 설계승인 요청(군→경상남도, 문화재청)

❍ 2014. 11월 : 사업완료

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계	19개 사업		100%
실시설계	4월 완료		30%
사업착공	5월 착공		10%
사업추진	10월 완료		30%
사업완료	12월완료		30%

시책번호	29	분야	찾고싶은 문화관광		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	문화관광과		담 당	관광기획	전화번호	960-5163
시 책 명	전략적 관광객 유치

□ 사업개요

❍ 기    간 : 연중

❍ 사업내용 : 관광객 유치 인센티브제, 관광팸투어, 박람회 홍보관

운영, 관광안내표지판 정비, 홍보물 제작 등

□ 추진계획

❍ 관광홍보                                            (단위:백만원)

유 형	시 기	수 량	소요예산
계			123
홍보물 및 기념품 제작	연중	6종 110,000부	60
관광박람회 홍보관 운영	2,3,5,9월	4회	15
함양관광 팸투어	4,7월	2회	15
관광객 유치 인센티브 시행	연중	-	3
관광안내표지판 정비	연중	12개소	30

❍ 관광산업종사자 친절교육 : 문화관광해설사 및 음식점․숙박업소 등

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
홍보물 및 기념품 제작	6종		30%
관광박람회 운영	4회		10%
함양관광 팸투어	2회		20%
관광안내표지판 정비	12개소		30%
관광종사자 친절교육	1회		10%

시책번호	30	분야	찾고싶은 문화관광		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	문화관광과		담 당	관광시설	전화번호	960-5165
시 책 명	농월정 복원

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 안의면 월림리 산92-1번지(216㎡)

❍ 사업내용 : 목조 팔작지붕(정면 3칸, 측면 2칸)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2015년

❍ 사 업 비 : 800백만원(도비 500, 군비 300)

□ 추진계획

❍ 2014. 2월 : 실시설계용역

❍ 2014. 3월 ~ 12월 : 착공 및 완공

❍ 2014 하반기 : 부대사업(종담서당보수, CCTV설치, 진입데크 교체)

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
실시설계	3월		20%
사업착공	3월		20%
사업추진	4월~11월		30%
사업완료	11월		30%

시책번호	31	분야	찾고싶은 문화관광		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	문화관광과		담 당	체육진흥	전화번호	960-5164
시 책 명	함양국민체육센터(수영장) 운영

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 생활체육공원 내

❍ 사업내용 : 수영장(25m×6레인), 헬스장, 다목적실, 체력측정실 등

❍ 사 업 비 : 6,500백만원(기금 3,200, 군비 3,300)

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년

❍ 규    모 : 연면적 2,714㎡(지하1층, 지상 2층)

□ 추진계획

❍ 2014.  3월 : 소요인력 채용 완료(체육지도자, 청사관리, 난방 등)

❍ 2014.  4월 ~ 5월 : 국민체육센터 준공 및 시험운전, 개장

❍ 2014.  4월 ~ 12월 : 국민체육센터 이용 홍보 및 이용객 모집

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
소요인력 채용	10명		20%
준공 및 개장	4월~5월		20%
국민체육센터 이용 홍보	5종		20%
국민체육센터 이용객 모집	연인원 50,000명		40%