건 설 교 통 과

부서명	건설교통과	담 당	도로관리담당 조영현	담당자	정수재 (☏4423)

이은~난평간도로 확·포장공사

❍ 지방도 연장으로 도로를 이용하는 군민의 교통편익 제공 및

지역 접근성 제고

❍ 지방도 확·포장으로 원활한 통행성 확보로 편익 증진 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 이은리 남산 ~ 난평리 신기

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.1km, B=9.5m, 교량 L=46m

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2021년

❍ 사 업 비 : 18,000백만원(도비 85%, 군비 15%)

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장L=2.1km 교량 1개소 L=46m	18,000	설계용역 보상 1식	1,200	도로확포장L=0.1km 보상 1식	3,000	도로확포장L=2.0km 교량 1개소 L=46m	13,800

❍ 추진실적 및 향후계획

- 실시설계 : 2015. 6월 ~ 12월

- 행정절차 이행 : 2015. 10월 ~ 2017. 10월

- 지방도 노선변경 고시 : 2017. 5월

- 보상협의 : 2017. 8월

- 공사착공 : 2018. 5월

□ 평가지표

성과지표(단위)	2018년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 안전사고발생(건수)	0	공사안전사고발생여부	10	산업재해 신고
② 재정집행율(%)	70	(‘18년 집행예산/ ‘17년 총사업비)*100	40	e 호조
③ 보상협의(%)	60	(‘18년보상금액/ ‘18년보상목표액)*100	20	‘18년 보상조서
④ 국도비 예산확보액(%)	100	(확보액/예산확보 목표액)*100	30	예산서

부서명	건설교통과	담 당	하천담당 소창호	담당자	서정우 (☏5257)

자연친화적 하천관리 사업

❍ 아름다운 자연형 생태하천 복원과 재해로부터 군민의 재산 보호

❍ 치수, 친수, 생태복원 및 역사와 문화가 흐르는 고향의 강으로 하천조성

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2018년	2019이후
계	3개소	하천정비 L=9.13km 교량 3개소	69,545	47,463	11,990	10,092
함양위천 생태하천 조성사업	함양읍 죽곡리 (솔숲) ~ 이은리 (인당교)	o 하천정비 L=3.4km o 교량 1개소	30,944	25,516	5,428	-
구룡천 고향의강 조성사업	함양읍 난평리 (신기교) ~ 이은리 (이은교)	o 하천정비 L=2.3km o 교량 2개소	17,687	14,297	3,390	-
소하천 정비사업	관동 소하천외 4개소	o 하천정비 L=5.63km	20,914	7,650	3,172	10,092	관동 미동 오현 남산 학골

□ 추진계획

❍ 착    공 : 2018. 1월

❍ 준    공 : 2018. 12월

□ 평가지표

성과지표(단위)	2018년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
①3월까지 조기 착공율(%)	100	(착공건수/사업건수)*100	25	착공신고서
②연내 사업준공율(%)	100	(준공건수/착공건수)*100	25	준공신고서
③재정 조기집행률(%)	60	(예산집행액/재정집행목표액)*100	25	예산집행실적(이호조)
④국도비 예산확보액(억원)	70	(확보액/목표액)*100	25	예산서

부서명	건설교통과	담 당	건설행정담당 신차상	담당자	홍영수 (☏4510)

주민숙원사업 시행

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 시행으로 편익제공

❍ 생활주변 불량 시설물 정비로 안전사고 사전 예방

❍ 새마을 농로 편입부지에 대한 민원예방과 행정력 손실 방지

□ 사업개요

❍ 주민숙원 및 소규모 주민숙원사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 202개소

․ 주민숙원사업 : 155개소(3,600백만원)

․ 소규모주민숙원사업 : 48개소(924백만원)

- 사 업 비 : 4,524백만원

- 사업기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사업대상 : 새마을사업 농로 편입부지 이전등기

- 사 업 비 : 60백만원

- 사업기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 추진계획

❍ 주민숙원사업

- 편입토지 희사승락서 사전 징구 : 2017. 10. ~ 2018. 2월

- 기본조사 및 실시설계 : 2018. 1. ~ 2.

- 사업시행 : 2018. 3. ~ 11.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 분할 및 등기대상 필지 조사 : 2018. 2.

- 협의 취득 및 이전등기 : 2018. 2. ~ 12.

□ 평가지표

성과지표(단위)	2018년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 주민숙원사업 해결(%)	100	(해결건수/건의건수)*100	40	결재 공문
② 국공유지 민원 해결(%)	100	(해결건수/민원건수)*100	20	결재 공문
③ 새마을사업 편입부지 공부정리(%)	100	(실적건수/계획건수)*100	20	결재 공문
④ 새마을사업 부지부지 등기(%)	100	(실적건수/계획건수)*100	20	결재 공문

부서명	건설교통과	담 당	선진교통담당 김복수	담당자	박춘성 (☏4544)

주‧정차 질서 홍보 및 단속 강화로 기초질서 확립

❍ 산삼 항노화 엑스포의 성공적인 개최를 위한 기초질서 확립

❍ 주·정차 질서 강화로 군민의식 선진화 전환

□ 추진방향

❍ 추진기간 : 2018. 1. ~ 12. (연중 지속)

❍ 군민의식 함양으로 질서있는 교통문화 조성

❍ 주차단속을 철저히 하여 불법 주·정차 사례 근절

□ 추진계획

❍ 홍보 전단지·현수막 제작 게첨

❍ 불법 주정차 차량에 대해 단속 전 안내문 부착으로 경각심 고취

❍ 유관기관(경찰서, 소방서 등)과 협조하여 합동 캠페인 실시

❍ 노상주차장 도색으로 주·정차 구역을 명확화하여 단속 기반 마련

❍ 고정식·이동식 CCTV를 이용하여 단속 강화

□ 평가지표

성과지표(단위)	2018년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 홍보물 제작 배부	3	제작 배부 횟수	20	시행공문(홍보물 제작·배부)
② 불법 주정차 단속	1,600	이동식+고정식 단속 건수	30	도로교통행정시스템 확인
③ 불법 주·정차 근절 캠페인	2	캠페인 실시 횟수	30	관련 공문
④ 노상주차장 도색사업 시행	시행	시행 여부	20	시행 공문

부서명	건설교통과	담 당	농촌개발담당 강득만	담당자	서상용 (☏4375)

재해위험 저수지 정비사업

❍ 저수지 붕괴 등으로 인한 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 유림면 유평리 유평저수지, 휴천면 호산리 도장골저수지

안의면 대대리 대대웃못저수지, 함양읍 대덕리 원골저수지

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 정비사업 1식

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년(5년간)

❍ 사 업 비 : 6,918백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2017년까지	2018년	2019년이후
합 계	8,418	2,430	1,760	4,228
유평	1,794	1,100	500	194
도장골	2,172	700	540	932
대대웃못	2,952	630	660	1,662
원골	1,500		60	1,440

□ 추진계획

❍ 원골저수지 실시설계 시행 : 2018. 3월

❍ 도장골 ․ 대대웃못저수지 착공 : 2018. 2월

❍ 유평저수지사업 준공 : 2018. 12월

□ 평가지표

성과지표(단위)	2018년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
①3월까지 조기 착공율(%)	100	(착공건수/사업건수)*100	25	착공신고서
②연내 사업준공율(%)	100	(준공건수/착공건수)*100	25	준공신고서
③재정 조기집행률(%)	60	(집행액/목표액)*100	25	예산집행실적(이호조)
④국도비 예산확보액(억원)	15	(확보액/목표액)*100	25	예산서