문 화 관 광 과

Ⅰ. 2014 업무추진 방향

Ⅱ. 2014 주요업무 계획

□ 고운 최치원 선생 역사공원 조성

□ 제53회 함양물레방아골축제 성공적 개최

□ 상림 토요무대 운영

□ 함양문화원 이전 건립

□ 사근산성 순국선열 추모사당 건립

□ 문화유산 보전사업

□ 지정 문화재 보수정비사업

□ 상림권역 유지 관리

□ 거연정 주변 정비사업 계획 수립

□ 남계·청계서원 부근 축사시설 매입

□ 전략적 관광객 유치와 홍보강화

□ 서원문화 관광자원화

□ 지리산 생태체험단지 조성

□ 상림주변지역 관광개발

□ 농월정관광지 정비

□ 농월정 복원

□ 백연유원지 조성

□ 백무동 주차장 조성

□ 노사초 공원 조성

□ 사근 찰방역 복원 관광자원화

□ 국민체육센터(수영장) 운영

□ 스포츠파크 조성

□ 체육 종목별 육성 및 스포츠 마케팅

□ 제2회 경상남도지사배 전국 산악자전거대회

□ 전천후 족구장 건립

□ 수동면 체육공원 조성

□ 고운체육관 및 종합운동장 보수

Ⅲ. 특수시책

□ 명현의 종친회 함양방문 관광객 유도

□ 함양 역사 유물 비지정 문화재 보존

Ⅰ		2014 업무추진 방향

대한민국 제일의 문화관광 메카 조성

	목 표
함양군의 역사, 문화, 예술이 어우러진 관광인프라 구축 년 2백만 관광객 유치시대 새 지평 개막 스포츠 레저산업 전진기지 육성 문화예술 향유 기회 확대, 군민 삶의 질 향상
	중점과제
군민들의 삶의 활력 제공 ⇨ 물레방아골축제, 토요무대 등 선현들의 업적 관광자원화 ⇨ 최치원, 정여창 등 명․경승지 관광명소 개발 ⇨ 지리산, 상림, 농월정, 서원 등 문화재 보전관리 ⇨ 보물, 사적지, 천연기념물 등 관광객 유치증대 ⇨ 도시민을 유혹하는 새로운 테마 창조 건강 체육진흥 ⇨ 국민체육센터, 스포츠파크, 실내 족구장 등 우수자원 관광인프라 구축 ⇨ 노사초 공원, 거연정, 찰방역 복원

	Ⅱ. 2014 주요업무 계획

2014 군정 주요업무

문화관광과 문화예술담당 ☏ 5161

고운 최치원 선생 역사공원 조성

❍ 고운 최치원 선생의 학문과 사상 등을 이해할 수 있는 학습의 장 마련

☞ 신라 최고의 문장가, 한문학의 비조, 동방 18현중 1인, 한중문화 교류자, 경주최씨 시조

❍ 상림 숲 조성의 애민정신을 스토리텔링화하여 관광자원화

☞ 상림 숲 조성은 우리나라에 현존하는 최치원 선생 생애 업적 중 최고의 토목사업임

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 지내(고운광장 뒤편)

❍ 사 업 량 : 부지면적 18,521㎡, 건축면적 148.68㎡, 진입도로 L=256m

❍ 사업내용 : 기념관, 역사사료관, 화장실, 광장 등

❍ 사 업 비 : 5,052백만원(국비 1,450, 도비 435, 군비 3,167)

┏ 공  사  비 : 3,478백만원(당초 2,900, 국비 50%, 도비 15%, 군비 30%, 증 578)

┗ 부지매입비 : 1,574백만원(당초 1,306, 군비, 증 268)

☞ 현재 확보액 3,852백만원(공사비 2,278, 부지대 1,574)

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2015년

□ 추진계획

❍ 2013. 12월 : 토목․건축공사 발주 착공(2,348백만원)

※ 전기․전시․폐기물처리․단청․조경공사 등 향후 별도 발주

❍ 2014.  1월 : 토지수용 절차 이행

❍ 2014.  6월 : 진입로 개설 및 지반정리

❍ 2015. 10월 : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 선현의 업적 관광자원화로 관광객 유치증대 및 세세보전

2014 군정 주요업무

문화관광과 문화예술담당 ☏ 5161

제53회 함양물레방아골축제 성공적 개최

❍ 함양의 역사와 전통문화예술 관광자원화 ⇨ 문화콘텐츠 개발

❍ 지역민 참여 축제로 군민 화합 도모 ⇨ 하나 된 군민 네트워크 구축

❍ 농․특산물 마케팅 축제로 지역경제 활력 제고 ⇨ 브랜드 가치 상승

□ 개    요

❍ 개최기간 : 2014. 10월 초(예정)

❍ 장    소 : 상림공원 일원

❍ 사 업 비 : 250백만원

❍ 주요내용 : 고유제, 문예행사, 체험행사, 농․특산물엑스포 등

□ 추진방침

❍ 함양의 역사와 문화, 농․특산물을 대외에 널리 알리는 축제

❍ 볼거리, 즐길거리, 먹거리가 풍부, 돈과 사람을 끌어 모으는 축제

❍ 많은 관람객, 감동과 흥, 비용보다 효용에 컨셉을 둔 축제

❍ 가족끼리, 연인끼리, 친구끼리, 직장동료끼리 상생․소통하는 축제

□ 추진계획

❍ 전국 우수 문화축제 견학, 군정접목 : 3 ~ 5회

❍ 함양의 정서에 부합하는 새로운 프로그램 개발 : 3 ~ 5종

❍ 축제위원회 조직정비 및 불합리한 운영규정 변경 : 연중

□ 기대효과

❍ 함양의 정체성 확립 및 문화기반 확대

문화관광과 문화예술담당 ☏ 5161

2014 군정 주요업무

상림 토요무대 운영

❍ 음악, 무용, 국악, 관현악 등 다양한 장르의 공연 유치

❍ 군민(가족, 연인, 친구, 직장 동료 등)들의 상생․소통의 장 마련

❍ 한 주간 삶의 피로와 스트레스를  해소케 함으로써 생활에 활력 제공

□ 개    요

❍ 운영기간 : 2014. 6월 ~ 9월(매주 토요일)

❍ 운영시간 : 19:00 ~ 21:00(프로그램별 조정 시행)

❍ 운영회수 : 16 회(월 4 회 ), 회당 300명이상 참여

❍ 사 업 비 : 38백만원(운영비 18, 무대보수비 20)

□ 추진계획

❍ 2014. 4월 : 공연신청 공모(인근 시군과 교류, 우수 공연 유치)

❍ 2014. 5월 : 무대 등 보수정비(지붕, 조명, 바닥)

❍ 2014. 6월 ~ 9월 : 공연 실시

※ 읍면별 1회씩 토요무대 출연 : 노래, 풍물, 체조 등

□ 애로사항

❍ 군민들의 호응도는 좋으나 무대시설 미비로 출연자 불만

☞ 무대 보수 부족예산 58백만원 추경예산 반영

2014 군정 주요업무

문화관광과 문화예술담당 ☏ 5161

함양문화원 이전 건립

향토문화를 계승 발전시켜 오고 있는 건물이 협소, 노후하여 현재의    활용성을 충족시키지 못하고 있어 시대적 요구에 적합한 건축으로       새로운 문화 창달을 도모하고자 함

□ 이전계획

❍ 위    치 : 함양읍 일원

❍ 규    모 : 부지 4,000㎡, 건축물 1,490㎡(지하 1층, 지상 3층)

❍ 주요시설 : 향토문화연구실, 강의실, 전시실, 자료실, 사무실, 연습실 등

❍ 사 업 비 : 4,100백만원(부지매입비 1,800, 공사비 2,300)

※ 2014년 기본용역비 : 30백만원 확보(50%)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

□ 추진계획

❍ 2014. 3월 : 우수 지자체 시설 견학

❍ 2014. 3월 : 기본계획 수립 및 용역 시행

❍ 2014년 하반기 : 공유재산 관리계획 반영

❍ 2015년 : 부지매입 및 행정절차 이행

❍ 2016년 : 공사착공

□ 기대효과

❍ 군민들의 활용도 향상과 자긍심 및 애향심 고취

2014 군정 주요업무

문화관광과 문화재담당 ☏ 5162

사근산성 순국선열 추모사당 건립

고려말기 삼남지방을 노략질하던 왜구를 맞아 혈전 끝에 중과부적으로   모두 순절한 호국영령들의 넋을 기리는 제향공간을 건립하여

충효교육의 장으로 활용하고자 함

□ 개    요

❍ 대    상 : 함양 사근산성(수동면 원평리 산53번지 일원)

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2014년

❍ 사업내용 : 사당 1동, 화장실 및 관리사 1동, 주차장 45면 조성

❍ 소요예산 : 2,150백만원(광특 1,000, 도비 349, 군비 801)

□ 추진실적

❍ 2013.  1월 : 실시설계용역 발주

❍ 2013.  7월 : 추진위원회 사업 설명 및 간담회 개최, 의견 수렴

❍ 2013. 10월 : 설계승인 요청(군→문화재청)

❍ 2013. 11월 : 사당건립예정지 기부채납 우리군 등기이전 진행

( 10,416㎡, 임씨문중 )

□ 향후일정

❍ 2013. 12월 : 진입도로 부지 매입 ( 6필지, 1,231 ㎡ )

❍ 2014.  2월 : 사당건립공사 발주

❍ 2015.  2월 : 건물공사 완료

□ 애로사항

❍ 사당 배치방향이 지세에 맞지 않아 문화재청 승인 지연

⇨ 주민이 원하는 만큼 관련 자료를 갖추어 설득

문화관광과 문화재담당 ☏ 5162

2014 군정 주요업무

문화유산 보전사업

선현들로부터 이어받은 문화유산의 훼손을 예방하고 품격을 격상시켜   후손들에게 전승하고 관광자원화하여 우리고장을 풍류와 예향의    고장으로 널리 알리고자 함

□ 개    요

❍ 대    상 : 뇌계 유호인 사당정비 외 5건

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 240백만원

(단위:백만원)

세 부 사 업 명	사 업 량	사업비
6 개소		240
뇌계 유호인 사당 정비	사당 확장 정비(4㎡→8㎡), 부지조성(100㎡)	100
논개묘역 정비	담장설치(50m), 제향공간 조성, 홍살문 설치	30
이은리 석불 좌대 주변정비	잡목제거, 울타리 설치, 안내판 설치	10
문화유적지 초가지붕 정비	초가지붕 이엉잇기 3개소(8동)	30
재난대비 긴급 보수정비	파손 문화재 긴급 보수(연중)	70

※ 문화재 지정추진 : 8 개소(정천상고택, 허영오고택, 정순오고택,

서하파출소고담, 논개묘역, 종담서당, 지족당고가, 노씨동산정사)

□ 기대효과

❍ 파손된 문화유산을 보수․정비하여 군민의 역사의식 고취

❍ 가치 있는 문화유산의 체계적 유지관리로 향후 문화재로 지정

2014 군정 주요업무

문화관광과 문화재담당 ☏ 5162

지정 문화재 보수정비사업

❍ 노후 문화재의 보수를 통한 문화유산의 원형 보존관리 및 전승

❍ 문화재를 활용한 관광자원화로 관광객 유치와 군민 자긍심고취

□ 사업계획

❍ 대 상 : 지정문화재 18개소(국가 8, 지방 10), 전통사찰 1개소

(단위:백만원)

계		국가		지방		전통사찰
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
19	1,785	8	1,025	10	660	1	100

- 국가 : 거연정, 황석산성, 승안사지 삼층석탑, 법인사 목조아미타 여래좌상,

상림, 목현리 구송, 학사루 느티나무, 운곡리 은행나무

- 지방 : 광풍루, 함양향교, 청계서원, 송호서원, 거연정, 노참판댁고가,

우명리정씨고가, 오담고택, 팔령산성 기본계획, 개평리소나무.

- 전통사찰 : 상연대

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 1,785백만원(국비 767, 도비 579, 군비 439)

❍ 사업내용 : 문화재 및 전통사찰 보수정비

□ 추진일정

❍ 2014.  2월 : 문화재 보수정비 사업지침 및 사업확정

❍ 2014.  2월 ~ 4월 : 보수공사 실시설계 시행

❍ 2014.  5월 : 설계승인 요청(군→경상남도, 문화재청)

❍ 2014.  6월 : 공사 시행

❍ 2014. 11월 : 정산 및 사업완료

□ 기대효과

❍ 훼손된 문화재를 보수․정비하여 군민의 역사의식 고취

문화관광과 문화재담당 ☏ 5162

2014 군정 주요업무

상림권역 유지 관리

❍ 천연기념물인 상림을 전 군민이 함께 즐길 수 있는 공간 유지

❍ 주변 시설과 연계한 휴식공간으로서의 활용성 극대화

□ 개    요

❍ 대    상 : 함양 상림, 고운광장, 어린이 공원

❍ 사 업 비 : 158백만원

❍ 추진계획

(단위:백만원)

세 부 사 업 명		내 용	사업비
계			158
시설물 유지관리	상 림	유지관리 1식(가로등, 화장실 보수 등)	20
	음악분수대	음악분수 유지보수, 램프교체	10
	고운광장	가로등, 공연장, 산책로 등	10
	어린이공원	가로등, 화장실, 체육시설 등	10
인건비	시설물 관리	화장실 5, 환경정비 = 6명	57
	풀 베 기	5개소 = 5명	18
물 품 구 입		화장실, 청소용품, 홍보물, 퇴비, 검사	16
공 공 요 금		전기․수도․통신요금	25
장 비 구 입		삼륜전기오토바이, 예취기, 콤프레샤	2

□ 애로사항

❍ 행락성수기 주차관리를 위한 인건비 누락으로 주차질서 확보 애로

2014 군정 주요업무

문화관광과 문화재담당 ☏ 5162

거연정 주변 정비사업 계획 수립

명승 제86호(2012)로 지정되어 있는 거연정 일원에 대한 체계적인

주변정비 계획을 수립하여 문화재 주변 개발과 탐방객들의 편의

및 지역 주민 농산물 판매소득 향상에 기여하고자 함

□ 개    요

❍ 위    치 : 서하면 거연정 일원

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 3월

❍ 사 업 비 : 30백만원

❍ 사업내용 : 거연정주변 정비사업 계획수립용역 1식

(주차장조성, 쉼터, 농산물판매소 등)

□ 추진계획

❍ 2014. 1월 : 계획수립용역 발주

❍ 2014. 3월 : 용역 완료 및 사업 반영 신청(우리군→문화재청)

❍ 2014 하반기 : 공유재산 관리계획 수립 및 행정절차 이행

❍ 2015년 : 토지매입 및 사업 착수

□ 기대효과

❍ 우리나라 제일의 정자계곡 홍보를 통한 우리군의 위상 확보

❍ 화림동계곡과 선비문화탐방로를 찾는 관광객들의 주차불편 해소 및 쾌적한 관광인프라 구축

문화관광과 문화재담당 ☏ 5162

2014 군정 주요업무

남계·청계서원 부근 축사시설 매입

❍ 남계서원과 청계서원 부근에 대규모 축사시설이 위치하고 있어

악취로 인근 효리, 남계마을 주민(150가구)들의 일상생활과 문화재

관리에 지장 초래

❍ 남계서원은 2015년 세계문화유산 등재를 추진중에 있으며, 서원     관광자원화사업 후 관광객 유치에 어려움이 예상됨

□ 개    요

❍ 위    치 : 수동면 원평리 15번지 일원

❍ 사업내용 : (구)애계원, 양계시설 매입 및 철거

토지 7필지 16,080㎡, 양계장 및 부속건물 16동 연면적 5,473㎡

❍ 소요예산 : 1,000백만원

□ 추진계획

❍ 2014.  1월 : 감정평가

❍ 2014.  3월 : 협의 매수

❍ 2014.  4월 ~ 10월 : 축사철거

❍ 부지활용 방안 : 소공원 조성(향후 구체적 실시계획 수립)

⇨ 철거시 용역결과에 따라 사업비 부족 예상

□ 기대효과

❍ 남계·청계서원 문화재 관리 환경개선과 서원관광자원화사업 활성화

❍ 생활주변 가축사육에 따른 해묵은 환경민원 일소

※ 남계서원은 2014 유네스코 등재신청 후 실사를 거쳐 2015 확정

2014 군정 주요업무

문화관광과 관광기획담당 ☏ 5163

전략적 관광객 유치와 홍보강화

우리 군의 관광명소를 널리 알리고 주요 축제 및 관광상품개발로

국내외 관광객을 유치, 지역경제 활성화에 기여코자 함

□ 개    요

❍ 기    간 : 연중

❍ 사 업 비 : 123백만원

❍ 사업내용 : 관광객 유치 인센티브제, 관광팸투어, 박람회 홍보관

운영, 관광안내표지판 정비, 홍보물 제작, 문화관광

해설사 운영 등

□ 추진계획

❍ 관광홍보

(단위:백만원)

유 형	시 기	수 량	소요예산
계			123
홍보물 및 기념품 제작	연중	6종 110,000부	60
관광박람회 홍보관 운영	2월, 9월	2회	15
함양관광 팸투어	5월, 6월	2회	15
관광객 유치 인센티브 시행	연중	-	3
관광안내표지판 정비	연중	13개소	30

❍ 주요관광지 안내소 운영 홍보 : 3개소(문화관광해설사 배치)

❍ 관광산업종사자 친절교육 : 문화관광해설사 및 음식점․숙박업소 등

□ 기대효과

❍ 함양의 관광자원을 널리 알려 함양의 브랜드 가치 향상

2014 군정 주요업무

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

서원문화 관광자원화

서원과 전통한옥, 정자를 연계하여 유교 및 선비 문화에 대한 관광 자원화를 통해 관광객들에게 질 높은 관광체험 기회 제공

□ 개    요

❍ 위    치 : 수동면, 지곡면 일원

❍ 구역면적 : 71,706㎡

❍ 사업내용 : 강당, 청백리관, 일로당종택, 서원문화체험관 등

❍ 총사업비 : 9,000백만원(광특 4,000, 도비 1,700, 군비 3,300)

※ 토지매입비 2,100백만원

❍ 사업기간 : 2006년 ~ 2015년

□ 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2012년까지	2013년	2014년	2015년
계	9,000	4,962	756	1,600	1,682
국 비	4,000	1,981	378	800	841
도 비	1,700	1,094	114	240	252
군 비	3,300	1,887	264	560	589

□ 추진실적

❍ 2006.  5월 : 실시설계

❍ 2008.  5월 : 화산서원 주차장 및 구천서원 강당 신축

❍ 2010.  5월 ~ 2011. 7월 : 일로당기념관 및 종택 건립

❍ 2011.  1월 ~ 2011. 2월 : 실시설계용역

❍ 2011.  9월 ~ 2013. 6월 : 1, 2차분 준공

❍ 2013.  4월 : 3차분(건축) 착공

❍ 2013. 12월 : 군 관리계획 결정(화산서원)(어린이공원⇨역사공원)

□ 추진계획

❍ 2013. 4월 ~ 2014.  4월 : 서원문화체험관 외 9동 건립

❍ 2014. 4월 ~ 2015. 10월 : 화산서원 사당  외 5동 건립

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

2014 군정 주요업무

지리산 생태체험단지 조성

지리산권 동․식물 생태체험 및 학습 공간을 조성하여 관광객의 휴식과 체험공간으로 활용, 지역경제 활성화 및 관광시너지 효과 제고

□ 개    요

❍ 위    치 : 마천면 강청리 일원

❍ 사업기간 : 2008년 ~ 2015년

❍ 사 업 량 : 69,782㎡

❍ 사업내용 : 자연사관, 생태관, 자생식물원, 자연식생림, 피크닉장,

산약초공원, 갈대숲, 주차장 및 관리사 등

❍ 총사업비 : 18,704백만원(국비 7,024, 도비 2,107, 군비 9,573)

※ 토지매입비 3,700백만원(기 2,800백만원 집행 완료)

□ 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2012년까지	2013년	2014년	2015년이후
계	18,704	3,600	5,700	600	8,804
국 비	7,024	599	2,000	300	4,125
도 비	2,107	180	600	90	1,237
군 비	9,573	2,821	3,100	210	3,442

□ 추진실적

❍ 2006. 12월 : 지리산권관광개발계획 수립

❍ 2009.  9월 : 기본계획 용역 완료

❍ 2010.  1월 ~ 12월 : 군계획시설 결정(조건부 가결, 실시설계시 재심의)

❍ 2011.  1월 ~ 계속 : 편입부지 보상협의 실시

❍ 2011.  7월 ~ 2012. 5월 : 실시설계

❍ 2013.  9월 : 군계획위원회심의

❍ 2013. 11월 : 경상남도 계약심사

❍ 2013. 12월 : 공사 착공

❍ 2013. 12월 : 계약 및 착공

2014 군정 주요업무

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

상림주변지역 관광개발

천년의 숲 상림공원 주변에 대한 관광인프라 확충으로 볼거리 제공 및 관광편의시설 확보로 지역경제 활성화 도모

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 함양읍 운림리, 대덕리 일원

❍ 사업기간 : 2008년 ~ 2016년

❍ 사 업 량 : 394,948㎡

❍ 사업내용 : 숲생태체험관, 수생식물원, 연꽃단지, 약초·야생초화원,

전시·판매시설, 생태관찰데크, 물놀이체험장 등

❍ 총사업비 : 15,983백만원(국비 4,999 도비 1,500 군비 9,484)

※ 토지매입비 : 5,985백만원(212,906㎡)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2013년	2014년	2015년이후
계	15,983	140	1,000	14,843
국 비	4,999	-	-	4,999
도 비	1,500	-	-	1,500
군 비	9,484	140	1,000	8,344

□ 추진실적

❍ 2009. 1월 : 상림주변지역 관광개발사업 기본계획 수립

❍ 2011. 8월 : 농림수산식품부와 협의 결과 구역축소 조건 협의 동의

(당초 490,486㎡ → 394,948㎡)

□ 추진계획

❍ 2014. 상반기 : 군계획시설결정, 실시설계 용역 완료 및 계약심사

❍ 2014. 1월~ : 편입토지 보상 협의 추진

□ 건    의

❍ 사업의 원활한 추진을 위하여 토지매입비 부족분 4,985백만원

추경 반영

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

2014 군정 주요업무

농월정관광지 정비

국민들의 여가 활동 증가와 자동차를 이용한 레저활동 증가로     다양한 관광 형태 변화추세에 대응하는 관광지 개발

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 안의면 월림리(농월정) 지내

❍ 기    간 : 2013년 ~ 2018년

❍ 사 업 량 : 캠핑장 조성 6,247㎡

❍ 사업내용 : 오토캠핑장 24면, 캐빈하우스 6동, 관리사무실 1동

캐빈센터 및 주변정비, 화장실․취사장 리모델링 1식 등

□ 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2013년	2014년	2015년이후
계	8,000	600	1,000	6,400
국 비	4,000	300	500	3,200
도 비	1,200	90	150	960
군 비	2,800	210	350	2,240

※ 2014년 토지매입비 5억원 확보(총매입비 10억원중 부족분)

□ 추진실적

❍ 2012. 6월 : 군 계획시설 (변경)결정

❍ 2013. 6월 : 기본계획 및 실시설계용역(토목) 완료

❍ 2013. 8월 : 토지 및 지장물 보상협의 개시

❍ 2013. 11월 : 건축허가 및 경남도 계약심사

❍ 2013. 12월 : 공사 착공

2014 군정 주요업무

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

농  월  정   복  원

❍ 우리나라 제일의 대표적인 정자계곡인 화림동 계곡의 거연정,

동호정 등과 함께 선비문화를 대변하는 중요 문화유적지임

❍ 2003년 화재로 소실된 정자를 복원하여 선비문화의 자취가 깃들어      있는 문화유산을 후손들에게 전승하고자 함

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 안의면 월림리 산92-1번지(216㎡)

❍ 사업내용 : 목조 팔작지붕(정면 3칸, 측면 2칸)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2015년

❍ 사 업 비 : 800백만원(도비 500, 군비 300)

□ 추진실적

❍ 2013. 7. 25. : 농월정 복원을 위한 관계자 협의(문중종손)

❍ 2013. 8월 : 경남도 업무담당 관계자 방문시 설명(관광진흥과장 외3명)

❍ 2013. 8월 : 소요사업비 중 도비지원 요청(함양군→경남도)

❍ 2013. 10~11월 : 토지사용승낙서 징구

□ 추진계획

❍ 2014. 1월 : 실시설계용역

❍ 2014. 3월 ~ 12월 : 건축물 착공 및 완공

❍ 2014 하반기 : 부대사업(종담서당보수, CCTV설치, 진입데크 교체)

❍ 2015년 : 단청사업 개시

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

2014 군정 주요업무

백연유원지 조성

❍ 상림주변 주차공간 협소로 관광객, 다중집합 행사시 불편 초래

❍ 백연유원지 확장을 통한 관광인프라 구축

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 백연유원지 일원

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2016년

❍ 사 업 량 : 196,450㎡

❍ 사업내용 : 주차장, 숙박시설, 오토캠핑장, 편익시설 등

❍ 사 업 비 : 23,400백만원(사업비 13,400, 토지매입비 10,000)

□ 연차별 투자계획

구 분	계	2013년까지	2014년	2015년이후
계	23,400	132	100	23,168
국 비	6,700	-	-	6,700
도 비	2,680	-	-	2,680
군 비	14,020	132	100	13,778

□ 추진사항 및 일정

❍ 2013. 3월 ~ 현재 : 군관리계획(유원지)결정(변경) 용역

❍ 2014년 상반기 : 군 계획시설 결정

□ 건    의

❍ 실시계획 용역비 400백만원 및 토지매입비 10,000백만원 중

5,000백만원 추경 반영

5,000백만원 추경 반영

백무동 주차장 조성

2014 군정 주요업무

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

❍ 백무동 주변 주차공간 협소로 관광객 방문에 따른 불만 가중

❍ 주차장 확장을 통한 이용객 불편 해소 및 주민 활용성 증대

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 마천면 백무동 일원

❍ 예정면적 : 3,500㎡

❍ 사업내용 : 주차장 조성, 화장실 등

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

❍ 사 업 비 : 1,200백만원

(토지매입비 800, 행정용역비 50, 주차장 및 화장실 등 350 )

※ 예산확보액 : 850백만원(토지매입비 800, 설계용역비 50)

□ 연차별 투자계획

구 분	계	2014년	2015년	비 고
계	1,200	850	350

□ 추진계획

❍ 2014년 상반기 : 토지매입

❍ 2014년 하반기 : 실시설계용역

❍ 2015년 : 주차장 조성 및 화장실 설치

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

2014 군정 주요업무

노사초 공원 조성

❍ 근대바둑의 시조로 지칭되고 있는 노사초 선생을 기리는 추모공원 조성으로

❍ 우리지역 역사인물에 대한 새로운 조명과 관광인프라를 구축하고자 함

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 지곡면 개평리 일원

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2015년

❍ 사 업 량 : 15,000㎡, 바둑공원조성 1식

❍ 총 사업비 : 4,000백만원 정도 (사업비 3,300, 토지매입비 700 )

□ 연차별 투자계획

구 분	계	2014년	2015년이후
계	4,000	30	3,970
국비(광특)	1,000	-	1,000
도 비	300	-	300
군 비	2,700	30	2,670

※ 총 사업비는 기본계획 결과에 따라 확정

□ 추진계획

❍ 2014. 3월 : 선진지자체 견학을 통하여 기본구상

❍ 2014. 3월 : 기본계획 및 타당성조사 연구용역

❍ 2014 하반기 : 공유재산관리계획 수립

사근 찰방역 복원 관광자원화

2014 군정 주요업무

문화관광과 관광시설담당 ☏ 5165

❍ 역(驛)은 공항, 항구와 함께 도시발달의 주요 지점이었음

❍ 타 시군에 없는 사근 찰방역을 현대에 맞게 재조명 복원하여

타 지역과 차별화된 관광인프라 구축의 디딤돌로 활용

□ 개    요

❍ 위    치 : 수동면 소재지 일원

❍ 사업계획면적 : 5,000㎡정도

❍ 주요내용 : 역사 복원, 마굿간 설치, 찰방지기, 역참시장, 물레방아 등

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(사업비 4,320, 토지매입비 680)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

❍ 사근역의 역사 기록

·사근도 : 조선시대 10대 간선도로 중 제6로로서 한양에서 통영으로 가는 통로

·사근역  : 경상남도 지방 14개의 역길을 총괄하던 중심역(현 수동초)

관원 60여명, 관노 90명, 상등마 10마리 보유

·도찰방(종6품) : 조선시대 최고의 지성인이자 실학자인 이덕무(40세, 1978년)

·1980년 6개의 관련 비석 한 곳에 모아 관리

□ 연차별 투자계획

구 분	계	2014년	2015년이후
계	5,000	40	4,960
국비(광특)	2,140	-	2,140
도 비	642	-	642
군 비	2,218	40	2,178

※ 총 사업비는 기본계획 결과에 따라 확정

□ 추진계획

❍ 2014. 상반기 : 기본계획 및 타당성 조사 용역

❍ 2014. 하반기 : 공유재산관리계획 반영

2014 군정 주요업무

문화관광과 체육진흥담당 ☏ 5164

국민체육센터(수영장) 운영

❍ 군민스포츠 수요증가에 따른 양질의 스포츠 서비스 제공

❍ 실내 체육시설을 통한 다수 군민의 체육활동 여건 조성

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 스포츠파크 내

❍ 사 업 비 : 6,500백만원(기금 3,200, 군비 3,300)

❍ 규    모 : 연면적 2,714㎡(지하 1층, 지상 2층)

- 수영장(25m×6레인) : 367.5㎡

- 체온조절탕 : 17.4㎡

- 유아풀장 : 63.8㎡

- 다목적체육실 : 254.03㎡

❍ 2014 운영예산 확보사항 : 349백만원

( 인건비 125, 운영비 135, 자산취득비 등 79 )

□ 추진계획

❍ 2014. 1월 ~ 2월 : 공사마무리 및 조례제정

❍ 2014. 2월 ~ 3월 : 소요 인력 채용(수영강사, 안전요원 등)

❍ 2014. 3월 : 수영장 시험가동

❍ 2014. 4월 : 국민체육센터 준공 및 개장

□ 예상되는 문제점

❍ 운영분석결과 년간 311백만원 이상의 적자 예상

( 수입예상액 180백만원 – 지출예상액 490백만원 = △311백만원 )

⇒군민에 대한 공공 복지증진으로 감수

문화관광과 체육진흥담당 ☏ 5164

2014 군정 주요업무

스포츠파크 조성

❍ 스포츠파크를 조성하여 전지훈련팀 및 종목별 전국대회 유치

❍ 공공체육시설 확충으로 군민의 건강증진과 삶의 질 향상

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 일원

❍ 면    적 : 205,795㎡(기정 83,745, 증설 122,050)

❍ 사 업 비 : 25,800백만원(부지매입비 9,300백만원 포함)

❍ 사업내용 : 다목적구장, 축구장, 농구, 배구, 족구장 등 11개 시설

도로, 주차장, 휴게시설 등 부대시설

□ 연차별 투자계획

구 분	계	2013년까지	2014년	2015년이후
계	25,800	4,300	2,550	18,950
국 비(광특)	6,600	-	200	6,400
도 비	3,536	-	150	3,386
군 비	15,664	4,300	2,200	9,164

□ 추진계획

❍ 2014.  1월 ~ 12월 : 대상부지 추가매입(123필지, 151,516㎡)

❍ 2014.  2월 ~  5월 : 실시설계 용역시행

❍ 2014.  6월 ~ 10월 : 군계획시설 실시계획승인 등 행정절차 이행

□ 문제점 및 대책

❍ 토지매입 소요액 9,000백만원중 미확보분 3,000백만원 추경반영

2014 군정 주요업무

문화관광과 체육진흥담당 ☏ 5164

체육 종목별 육성 및 스포츠 마케팅

❍ 체육 종목별 저변확대로 전국대회 유치 등 대외홍보 활성화

❍ 삶의 질 향상에 따른 체육인구 증대로 스포츠 마케팅 제고

□ 개    요

❍ 기    간 : 2014. 1월 ~ 12월

❍ 장    소 : 종합운동장, 고운체육관, 체육공원 등

❍ 대    상 : 축구 등 18개종목

❍ 사 업 비 : 917백만원

□ 추진계획

❍ 전국 체육경기대회 유치 : 연 8회

월별	행 사 명	사업비 (백만원)			주관단체
		계	지원	자담
계	8 회	433	318	115
1월	전국 초․중학교 여자축구대회	20	15	5	축구협회
5월	제6회 전국 테니스대회	35	20	15	테니스협회
7월	봉림기 전국 실업검도대회	33	23	10	검도협회
	제2회 도지사배 전국 산악자전거대회	160	120 (도비40)	40	한국산악 자전거연맹
8월	제7회 노사초배 전국 아마바둑대회	73	65	8	바둑협회
9월	제1회 군수배 전국 마라톤대회	42	20	22	육상연합회
10월	제5회 군수배 전국 궁도대회	55	45	10	궁도협회
11월	제6회 군수배 전국 탁구대회	15	10	5	탁구협회

❍ 도민체육대회 참가 및 군민체육대회 개최 : 4월, 9월

❍ 종목별 협회 및 연합회 체육경기대회 개최 : 연 30회

❍ 전국 및 도 단위 대회 참가 : 연 23회

❍ 전지 훈련팀 유치 : 42개팀 1,160여명

제2회 경상남도지사배

문화관광과 체육진흥담당 ☏ 5164

2014 군정 주요업무

전국 산악자전거대회

❍ 전국 최우수 산악자전거 코스로 인식되어 각광받고 있는 산악

자전거 대회를 전국최고의 대회로 육성발전 시키고,

❍ 시너지 효과를 통한 지역경제 활성화에 이바지 하고자 함

□ 대회개요

❍ 2014. 8월 : 산삼축제 기간 중

❍ 장    소 : 함양읍 상림 ~ 백전면 임도 ( 43㎞ )

❍ 참가 예상인원 : 5,000 여명 (선수 및 가족 등)

❍ 소요예산 : 160백만원 (도비 40, 군비 80, 자담 40)

※ 2013년 결과

- 참여선수 : 1,164 명 (가족포함 3,000명)

- 사 업 비 : 120백만원 (도비 30, 군비 50, 자담 40)

□ 추진계획

❍ 2014.  2월 : 산악자전거대회 제안 공모

❍ 2014.  3월 : 협약체결 및 홍보개시

❍ 2014.  5월 ~ 6월 : 코스정비

❍ 2014.  7월 : 대회관련 사전준비

❍ 2014.  8월 : 대회개최

□ 애로사항

❍ 코스내 급경사, 커브길 등 경기중 사고 발생 위험요소 존재

⇨ 안전망시설 보완 및 보험가입 시행

2014 군정 주요업무

문화관광과 체육진흥담당 ☏ 5164

전천후 족구장 건립

❍ 족구운동이 주·야간 생활체육 스포츠로 확산되면서 타지역과

교류활동이 증가되고 있으나,

❍ 시설미비로 불편을 초래하고 있어 이를 해소하고 언제든지 경기와      여가선용이 가능한 전천후 족구장을 건립하고자 함

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 게이트볼장 내 현 족구장

❍ 사 업 량 : 철골조, 칼라강판지붕 지상 1층, 연면적 1,305㎡

❍ 사 업 비 : 1,200백만원(광특 480, 도비 200, 군비 520)

❍ 사업내용 : 족구장 1면, 사무실, 화장실 및 샤워장, 기계실 등

□ 추진계획

❍ 2014.  1월 : 실시설계용역 시행

❍ 2014.  2월 ~ 4월 : 건축협의 등 행정절차 이행

❍ 2014.  5월 : 공사착수

❍ 2014. 12월 : 사업완료

□ 예상되는 문제점

❍ 건립 예정부지 협소에 따른 후보지 재선정 검토

(당초 : 전천후 1면 ⇨ 확대 : 실내 2면, 야외 2면)

문화관광과 체육진흥담당 ☏ 5164

문화관광과 체육진흥담당 ☏ 5164

수동면 체육공원 조성

2014 군정 주요업무

❍ 수동면 주변 지역주민의 건강증진 및 여가활동 공간 제공

❍ 공공체육시설 확충으로 스포츠 활동을 통한 지역민의 건강증진과      단합 도모

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 수동면 화산리 1166-1번지 일원

❍ 면    적 : 15,390㎡(체육시설)

❍ 사 업 비 : 1,730백만원

❍ 사업내용 : 축구장, 화장실, 도로개설, 조경 등 부대시설

□ 연차별 투자계획

구 분	계	2013까지	2014년	2015년이후
계	1,730	464	300	966
국비(광특)	387	-	-	387
도 비	203	-	-	203
군 비	1,140	464	300	376

□ 그간의 추진사항

❍ 기본계획 용역 완료 : 2009년

❍ 부지조성 및 기반공사 완료(464백만원) : 2010년

□ 2014 추진계획

❍ 2014. 1월 : 실시설계

❍ 2014. 3월 : 사업착수 (간이화장실, 진행본부석, 휀스)

※ 년중 군 계획시설(체육시설)결정 협의 추진

2014 군정 주요업무

문화관광과 체육진흥담당 ☏ 5164

고운체육관 및 종합운동장 보수

❍ 효율적인 공공체육시설 관리를 위하여 노후시설 보수 필요

❍ 공공체육시설의 적기보수로 시설의 사용편의 제공

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 고운체육관 및 종합운동장

❍ 대    상 : 고운체육관 및 종합운동장

❍ 사업내용

- 고운체육관 천장, 벽체보수(마감재 교체)

- 고운체육관 음향시설 교체 (마이크, 스피커 등)

- 종합운동장 본부석 지붕 방수공사

❍ 소요예산 : 370백만원

(체육관보수 300, 운동장본부석 지붕보수 70)

□ 추진계획

❍ 2014.  1월 ~ 2월 : 보수공사 실시설계

❍ 2014.  3월 : 공사발주

❍ 2014.  7월 : 준공

	Ⅲ. 특수시책

문화관광과 문화예술담당 ☏ 5161

2014 군정 주요업무

명현의 종친회 함양방문 관광객 유도

❍ 함양을 빛낸 명현의 문화유산과 업적들을 아름다운 자연경관과      이야기, 즐비한 문화재와 유기적으로 엮어 관광자원화

❍ 명현의 종친회를 함양방문 관광객으로 유도

□ 개    요

명현	관련자원	대종중	인구수	비고
고운 최치원 경주 최씨	상림공원 (천기 154)	서울 시조 최치원, 후손 SK그룹	2000년 2,160,000
일두 정여창 하동 정씨	정여창 고택 남계서원	서울 02-921-970 시조 박응주, 후손 정몽준	2000년 159,000
연암 박지원 반남 박씨	안음현감 물레방아	서울 02-334-4059(6615) 시조 정도정, 후손 박준우	2000년 140,000

☞ 연차별 확대

□ 추진계획

❍ 2014.  5월 : 종친회 대종중 방문 협의

❍ 2014.  7월 : 명현의 문화유산과 관련된 이야기들 자료 수집 비치

☞ 연암 : 풍구, 베틀, 양수기, 물레․연자방아, 벽돌제조, 저서 등

❍ 2014.  8월 : 대종중 임원진 함양 초청

❍ 2014. 10월 : 명현과 관련된 관광코스 개발

□ 기대효과

❍ 함양 홍보 및 관광객 유치 증대 시너지 효과 창출

2014 군정 주요업무

문화관광과 문화예술담당 ☏ 5161

함양 역사 유물 비지정 문화재 보존

❍ 우리 함양은 선비충절의 고장으로 보존 가치가 있는 유물이 많음

❍ 세월의 흐름에 따라 원형을 잃어가는 전승가치 하락 및 내용 단절

❍ 보수(복원)을 통하여 함양의 자랑거리로 세세손손 보전

□ 개    요

❍ 대      상 : 누각, 정자, 비석, 열녀문 등(이야기, 전설도 포함)

❍ 내    용 : 글씨, 도색, 기둥, 벽체, 창문, 지붕, 현판 등

❍ 사 업 비 : 50백만원

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

□ 추진계획

❍ 2014. 4월까지 : 조사팀 구성(한학자, 역사학자, 지역의 산증인 등)

❍ 2014. 6월까지 : 전 읍면 관리 대상 현지조사

❍ 2014. 7월까지 : 전문가 의견 수렴

❍ 2014. 8월 ~ : 석조류 글자 도장가능 부분 사업 시행

❍ 2014. 9월 ~ : 소유자와 관리방안 협의 후 군정 반영 협의

❍ 2015년      : 자료정비 책자 발간

□ 기대효과

❍ 후손들에게 바른 역사 전승

❍ 기본이 바로 선 건강한 사회 조성