건 설 교 통 과

Ⅰ. 2014 업무추진 방향

Ⅱ. 2014 주요업무 계획

□ 주민숙원사업

□ 생활주변 안전시설 정비사업

□ 새마을 편입부지 이전등기

□ 군도 확·포장사업

□ 농어촌도로 확·포장사업

□ 어린이 보호구역 개선사업

□ 어린이 안전영상정보 인프라 구축사업

□ 위험도로 구조개선사업

□ 교통사고 잦은곳 개선사업

□ 도로개보수사업(군도,농어촌도로)

□ 도로시설 유지보수사업 및 교량 안전진단

□ 권역단위 종합정비사업

□ 읍면 소재지 종합정비사업

□ 조동지구 신규마을 조성사업

□ 소규모 농업용수 개발사업

□ 오산지구 밭기반 정비사업

□ 대중교통시설물 개선 및 군 이미지 홍보

□ 운수업체 재정 지원사업

□ 교통 안전시설물 설치 및 관리

□ 공영버스 확대 보급

□ 교통약자 특별 교통수단 운영

Ⅲ. 특수시책

□ 입주자 주도형 특색있는 신규마을조성사업

□ 서상 다목적 공원 및 주차장 조성사업

Ⅰ		2014 업무추진 방향

쾌적하고 살기 좋은 함양건설

	목 표
완벽한 건설사업 시행으로 함양발전 기반 구축 신기술 적용으로 예산절감 기술력 향상 지역균형 개발을 위한 도로망 구축 친환경공법 적용으로 저탄소 녹색성장 함양건설
	중점과제
주민숙원사업 및 재정건의사업 등을 소득기반 시설로 전환 도로망 확충으로 지역 균형발전 도모 농촌마을 종합정비 사업으로 주민소득증대 기반 마련 교통안전시설 확충으로 교통사고 ZERO화 총력

	Ⅱ. 2014 주요업무 계획

2014 군정 주요업무

건설교통과 건설담당 ☏ 5191

주 민 숙 원 사 업

❍ 지역주민의 숙원사업인 생활기반시설과 편익 증대를 위한

환경정비사업을 중점 추진

❍ 다중이용시설(마을회관, 정자 등)보수 및 완벽한 유지관리 강화

□ 개    요

❍ 위    치 : 전 읍ㆍ면

❍ 사 업 량 : 222개소

- 주민숙원사업 115개소

- 소규모주민숙원사업 87개소

- 정자유지관리사업 10개소

- 마을회관 및 화장실 보수 10개소

❍ 사 업 비 : 5,370백만원

❍ 사업기간 : 2014. 1. 1. ∼ 12. 31일

□ 추진계획

❍ 추진일정

- 편입토지 희사승락서 사전 징구 : 2013. 12. ∼ 2014. 1월

- 기본조사 및 실시설계 : 2014. 1. ∼ 2014. 2월

- 사업시행 : 2014. 3. ∼ 2014. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 주민숙원사업의 요구는 많으나, 예산부족으로 적절한 지원이 이루어지지 않아 애로 발생, 충분한 예산 확보 필요

□ 기대효과

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 해소

❍ 생활기반시설 확충으로 주민 편익제공을 통한 삶의 질 향상 기여

2014 군정 주요업무

건설교통과 건설담당 ☏ 5191

생활주변 안전시설 정비사업

생활주변 차량통행 및 보행 환경을 위협하고 있는 마을내 불량 맨홀, 휀스, 측구 등 생활안전 시설을 정비하여 안전사고 사전 예방으로 군민의 소중한 생명과 재산을 보호코자 함

□ 개    요

❍ 위    치 : 전 읍ㆍ면

❍ 사 업 량 : 생활주변 안전시설 20개소

❍ 사 업 비 : 100백만원

❍ 사업기간 : 2014. 1. 1. ∼ 12. 31일

□ 추진계획

❍ 사업내용

- 불량맨홀 인상링(높이 조절링)설치 및 보수

- 가드레일 및 안전휀스 설치

- 주요도로 불량노면 요철 정비

- 도로배수용 불량측구 및 횡단측구(그레이팅)등 정비

❍ 추진일정

- 생활주변 불량시설 읍면별 전수조사 : 2013. 12월

- 사업계획 및 시행 : 2014. 2. ∼ 6월

□ 기대효과

❍ 생활주변 안전시설 정비로 농촌지역 노령화 인구의 안전성확보

❍ 차량 및 보행자의 안전을 위협하고 있는 불량 시설정비로 각종

민원해소와 안전사고 사전예방

2014 군정 주요업무

건설교통과 건설담당 ☏ 5191

새마을사업 편입부지 이전등기

❍ 새마을 농로 편입부지에 대한 빈번한 민원발생 및 부당이득금․

임료청구 소송 등이 발생되고 있어,

❍ 적극적인 이전등기 및 시효취득으로 민원을 예방하고, 청구소송

으로 인한 행정력 손실 방지 및 군민의 재산권을 보호하기 위함

□ 개    요

❍ 위    치 : 전 읍ㆍ면

❍ 사업대상 : 새마을사업 농로 편입부지 이전등기

❍ 사 업 비 : 200백만원

❍ 사업기간 : 2014. 1. 1. ∼ 12. 31.

□ 추진계획

❍ 사업내용

- 등기대상 필지의 소유자와 증여 협의 취득

- 증여 협의 취득이 안 될 경우 군에서 일괄 시효취득(민법 제245조)

❍ 추진일정

- 1읍면 1마을 선정 : 2014. 1월

- 추진상황 점검 및 선정마을 설명회 개최

- 분할 및 등기대상 필지 조사 : 2014. 2월

※ 담당공무원, 이장, 개발위원 협조 현장 조사

- 협의 취득 및 이전등기 : 2014. 2. ∼ 2014. 12월

□ 기대효과

❍ 민원발생으로 인한 행정력 손실 방지 및 군민의 재산권 보호

2014 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

군도 확·포장사업

❍ 군도의 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로 주민 편익 증대

□ 개    요

❍ 노선수 및 사업량 : 24개 노선, L=193.8km

❍ 사업비 : 224,293백만원

□ 그간 추진 실적                          (단위:km/백만원)

노선수	전체		기투자		2013년		2014년 시행		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
24	193.8	224,293	90.8	75,378	6.1	2,244	4.4	1,769	92.5	144,902

□ 추진계획

❍ 사업내용                                        (단위:km/백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	기시행	2014년	장래
계	4개소	4.4	11,120	2,660	1,769	6,691
함양~국계(군도6호)	유림 국계	1.3	2,600	600	400	1,600	계속
원구~거면(군도4호)	함양 구룡	1.2	2,760	260	400	2,100	신규
구룡~옥환(군도9호) (원산~지소)	병곡 원산	1.2	2,760	600	269	1,891	계속
도천~구라(군도16호)	병곡 월암	0.7	3,000	1,200	700	1,100	특교

❍ 추진일정

- 2014. 1. ∼ 2014. 8월 : 실시설계 용역 시행

- 2014. 3. ∼ 2014. 4월 : 사업시행

- 2014. 11월 : 사업완료

□ 문제점 및 대책

❍ 예산부족으로 공사기간 장기간 소요, 부족사업비 조기 확보

□ 기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

2014 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

농어촌도로 확·포장사업

❍ 농어촌도로의 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로 주민 편익 증대

□ 개    요

❍ 노선수 및 사업량 : 303개 노선, L=754.2km

❍ 사업비 : 680,631백만원

□ 그간 추진 실적                           (단위:km/백만원)

노선수	전체		기투자		2013년		2014년 시행		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
303	754.2	680,631	314.06	238,966	4.6	4,752	7.4	1,776	428.14	435,137

□ 추진계획

❍ 사업내용                                         (단위:km/백만원)

사업명	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	기시행	2014년	장래
계	8개소	7.4	14,300	3,616	1,776	8,908
정개선	지곡 보산	0.8	3,100	1,616	300	1,184	계속
미금선	휴천 대천	0.6	1,400	900	200	300	계속
가덕선	마천 가흥	0.6	1,600	400	300	900	계속
동상선	안의 신안	1.0	1,500	500	300	700	계속
대포선	휴천 대천	0.4	600	200	100	300	계속
대안선	백전 대안	0.6	1,000	-	193	807	실시설계
실도선(도마)	마천 덕전	1.6	2,400	-	190	2,210	실시설계
대웅선	유림 대궁	1.8	2,700		193	2,507	실시설계

❍ 추진일정

- 2014. 1. ∼ 2014. 8월 : 실시설계 용역 시행

- 2014. 3. ∼ 2014. 4월 : 사업시행

- 2014. 11월 : 사업완료

□ 문제점 및 대책

❍ 예산부족으로 공사기간 장기간 소요, 부족사업비 조기 확보

□ 기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

2014 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

어린이 보호구역 개선사업

어린이보호구역내 도로교통 안전시설을 정비함으로써 어린이 보호구역의 환경을 개선하기 위함

□ 개    요

❍ 사업구분 : 광특회계사업(광역발전계정)

❍ 위    치 : 함양군 일원(11개 읍면)

❍ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 2014. 12월(1년간)

❍ 사 업 량 : 도로 교통안전시설 및 차선도색 1식

❍ 사 업 비 : 60백만원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2013년		2014 계획		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	교통안전시설 ,차선 도색	1,720	교통안전시설 ,차선 도색	640	교통안전시설 ,차선 도색	440	교통안전시설 ,차선 도색	60	교통안전시설 ,차선 도색	580
국 비		860		320		220		30		290
도 비
군 비		860		320		220		30		290

□ 추진계획

❍ 사업내용

- 사업명 : 어린이보호구역개선사업

- 사업량 : 교통안전시설 및 차선도색 1식

- 사업비 : 60백만원

❍ 추진일정

- 2014. 1. ∼ 2월 : 실시설계

- 2014. 3월 : 사업 시행

- 2014. 9월 : 사업완료

□ 기대효과

❍ 어린이보호구역내 도로교통 안전시설 설치로 안전한 등·하굣길 조성

2014 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

어린이 안전영상정보 인프라 구축사업

어린이보호구역내 CCTV를 설치함으로써 어린이 대상 각종 교통 및 강력범죄 사고를 사전에 예방하기 위함

□ 개    요

❍ 사업구분 : 광특회계사업(광역발전계정)

❍ 위    치 : 함양군 일원(지곡초등학교, 천령유치원)

❍ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 2014. 12월(1년간)

❍ 사 업 량 : CCTV 설치 2개소

❍ 사 업 비 : 200백만원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2013년		2014 계획		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	CCTV 설치 27개 지구	1,164	CCTV 설치 22개 지구	664	CCTV 설치 3개 지구	300	CCTV 설치 2개 지구	200	-	-
국 비		582		332		150		100		-
도 비
군 비		582		332		150		100		-

□ 추진계획

❍ 사업내용

- 사업명 : 어린이보호구역내 CCTV 설치사업(지곡초, 천령유치원)

- 사업량 : CCTV 설치 1식

- 사업비 : 200백만원

❍ 추진일정

- 2014. 1 ∼ 2월 : 실시설계

- 2014. 3월 : 보안성 검토 및 행정 예고

- 2014. 4월 : 사업 시행

- 2014. 9월 : 사업완료

□ 기대효과

❍ 교통사고 및 강력범죄 사전 예방으로 안전한 등·하굣길 조성

2014 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

위험도로 구조개선사업

❍ 위험도로 구조개선사업 5개년 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 도로간 연계성, 사고위험성, 교통량 증가 요인 등 다각적 검토를

통한 우선순위를 결정하여 사업 선정

□ 개    요

❍ 위  치 : 함양군 수동면 도북리 일원

❍ 사업비 : 100백만원

❍ 사업량 : 위험도로 개보수 L=1.0km

□ 추진계획

❍ 사업내용                                        (단위:km/백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비 고
			계	기시행	2014년	장래
계	1개소	0.4	1,000	0	100	900
하교~내백(군도11호)	수동 도북	0.4	1,000	-	100	900	신규

❍ 추진일정

- 2014. 1. ∼ 2014. 3. : 실시설계 용역 시행

- 2014. 3. ∼ 2015. 12월 : 사업시행

- 2015. 12월 : 사업완료

□ 기대효과

❍ 불합리한 도로구조로 교통사고가 빈번한 위험도로에 대하여 선형을 개량하고 구조를 개선하여 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

2014 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

교통사고 잦은곳 개선사업

교통사고 잦은곳의 교차로 신호체계를 회전교차로로 전환함으로써

원활한 교통흐름을 제공하고자 함

□ 개    요

❍ 위  치 : 함양군 함양읍 교산리 주차장사거리 일원

❍ 사업비 : 650백만원

❍ 사업량 : 회전교차로 1식

□ 추진계획

❍ 사업내용                                        (단위:km/백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	기시행	2014년	장래
계	1개소	1식	650	0	650	0
주차장 사거리 회전교차로설치사업	함양읍 교산리	1식	650	0	650	0	광특

❍ 추진일정

- 2014. 1. ∼ 2014. 3. : 실시설계 용역 시행

- 2014. 3. ∼ 2015. 12월 : 사업시행

- 2015. 12월 : 사업완료

□ 기대효과

❍ 신호체계를 회전교차로로 전환함으로써 원활한 교통 흐름으로 내방객에 대한 우리군 도로환경 이미지 제고

2014 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

도로 개보수사업(군도, 농어촌도로)

군도 및 농어촌도로의 불합리한 도로구조로 교통사고가 빈번한 지역에 대하여 도로를 개보수함으로써 안전사고 사전 예방

□ 개    요

❍ 위  치 : 함양군 관내

❍ 사업비 : 126백만원

□ 추진계획

❍ 사업내용                                        (단위:km/백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비	비 고
계	2개소	L=0.5km	126
내 팔 선	함양 죽림	L=0.2km	50
운곡 201호	서하 운곡	L=0.3km	70
실시설계용역	1식		6

❍ 추진일정

- 2014. 1. ∼ 2014. 3월 : 실시설계 용역 시행

- 2014. 3. ∼ 2014.  6월 : 사업시행

- 2014. 6월 : 사업완료

□ 기대효과

❍ 도로 개보수가 필요한 지역에 대하여 도로구조를 개보수함으로서 도로 기능 회복 및 개선

2014 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

도로시설 유지보수사업 및 교량 안전진단

❍ 우리군 관내도로의 지속적인 유지관리로 교통사고 미연방지와

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

❍ 도로 긴급 상황 발생 시 신속한 복구

□ 개    요

❍ 도로현황

- 총 노 선 : 335개소 1,100㎞(포장 : 541㎞)

- 위임국도 :   1개소    29㎞(포장 :  29㎞)

- 지 방 도 :   7개소   124㎞(포장 : 109㎞)

- 군    도 :  24개소   193㎞(포장 :  90㎞)

- 농어촌도로 : 303개소   754㎞(포장 : 313㎞)

□ 추진계획

❍ 유지관리비                                     (단위 : ㎞, 백만원)

구분	계		유지관리				교량안전진단		비 고
			도 로		표지판
	연장/개소수	사업비	연 장	사업비	개소수	사업비	개소수	사업비
유지관리비	541/40	366	541	216	10	50	30	100

※ 시설물의안전관리에관한특별법에 의거 2종시설물은 2년 주기 안전진단(4개소) 및

그 외 교량 110개소

□ 문제점 및 대책

❍ 매년 유지관리비 부족으로 도로 유지관리에 어려움이 많음

□ 기대효과

❍ 도로 긴급 상황 발생 시 신속한 복구로 통행 여건 확보

❍ 도로 유지관리로 교통사고 미연방지와 쾌적한 도로환경 조성

❍ 신속한 도로시설의 개․보수로 시설물 수명 연장

2014 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

권역단위 종합정비사업

❍ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

□ 개    요

사 업 명	위 치	사업기간	사 업 비(백만원)				비 고
			합 계	2013년 까지	2014년	2015년 이후
합 계			21,509	7,670	4,154	9,685
백현권역	백전면 경백리 오천리	2011 ∼ 2014년	7,137	6,054	1,083	-	2011년 신규사업 (군 직영)
오매실권역	백전면 대안리 구산리	2012 ∼ 2015년	3,140	1,043	1,784	313	2012년 신규사업 (농촌공사)
봉전권역	서하면 봉전리	2013 ∼ 2016년	4,247	573	429	3,245	2013년 신규사업 (농촌공사)
삼동권역	병곡면 옥계리	2014 ∼ 2017년	3,483	-	429	3,054	2014년 신규사업 (군 직영)
죽림권역	함양읍 죽림리	2014 ∼ 2017년	3,502	-	429	3,073	2014년 신규사업 (농촌공사)

※ 재원 비율(광특 70%, 도비 9%, 군비 21%,  기타 779백만원)

□ 추진실적

❍ 백현권역 종합정비사업 기본계획 수립 : 2011. 11. 2.

❍ 백현권역 종합정비사업 시행계획 수립 : 2012. 6. 4.

❍ 오매실권역 종합정비사업 기본계획 수립 : 2012. 10. 24.

❍ 일반농산어촌개발사업(삼동, 죽림권역) 신규사업 선정 : 2013. 5월

❍ 오매실권역 종합정비사업 시행계획 수립 : 2013. 9. 10.

❍ 오매실권역 종합정비 하드웨어사업 착공 : 2013. 10. 30.

□ 추진계획

❍ 2014년 신규사업(삼동, 죽림권역) 기본계획용역 착수 : 2014. 2월

❍ 백현권역 공동이용시설(두레원) 위탁관리 협약 체결 : 2014. 4월

❍ 백현권역 공동이용시설(두레원) 위탁관리 운영 : 2014. 5월

❍ 2014년 신규사업(삼동, 죽림권역) 기본계획 수립 : 2014. 8월

❍ 2014년 신규사업(삼동, 죽림권역) 실시설계용역 착수 : 2014. 9월

❍ 2014년 신규사업(삼동, 죽림권역) 시행계획 수립 : 2014. 12월

❍ 삼동, 죽림권역 종합정비 하드웨어사업 착공 : 2015. 2월

□ 기대효과

❍ 농촌마을의 생활환경정비와 주민 소득기반 확충

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

2014 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

읍면 소재지 종합정비사업

❍ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 면소재지 거점기능 강화

□ 개    요

사 업 명	위 치	사업기간	사 업 비(백만원)				비고
			합 계	2013년 까지	2014년	2015년 이후
합 계			27,033	3,998	4,430	18,605
유림면	유림면 화촌리 서주리	2012년∼ 2015년	3,634	1,112	2,143	379	‘2012년 신규사업 (농촌공사)
서상면	서상면 도천리 대남리	2012년∼ 2015년	3,250	1,053	1,000	1,197	‘2012년 신규사업 (농촌공사)
마천면	마천면 가흥리	2013년∼ 2016년	6,780	926	429	5,425	‘2013년 신규사업 (군직영)
지곡면	지곡면 개평리 창평리	2013년∼ 2016년	6,651	907	429	5,315	‘2013년 신규사업 (농촌공사)
휴천면	함양읍 목현리	2014년∼ 2017년	6,718	-	429	6,289	‘2014년 신규사업 (군 직영)

※재원 비율(광특 70%, 도비 9%, 군비 21%, 기타 542백만원)

□ 추진실적

❍ 유림면소재지 종합정비사업 기본계획 수립 : 2012. 10. 24.

❍ 서상면소재지 종합정비사업 기본계획 수립 : 2012. 12. 24.

❍ 마천, 지곡면소재지 종합정비사업 기본계획 수립 : 2013. 7. 31.

❍ 서상면소재지 종합정비사업 시행계획 수립 : 2013. 9. 6.

❍ 마천면소재지 종합정비사업 실시설계 용역 착수 : 2013. 9. 13.

❍ 유림면소재지 종합정비사업 시행계획 수립 : 2013. 10. 15.

❍ 서상면소재지 종합정비 하드웨어사업 착공 : 2013. 10. 30.

❍ 유림면소재지 종합정비 하드웨어사업 착공 : 2013. 11. 30.

□ 추진계획

❍ 2014년 신규사업(휴천면소재지) 기본계획 용역 착수 : 2014. 2월

❍ 마천, 지곡면소재지 종합정비사업 시행계획 수립 : 2014. 6월

❍ 2014년 신규사업(휴천면소재지) 기본계획 수립 : 2014. 8월

❍ 2014년 신규사업(휴천면소재지) 실시설계용역 착수 : 2014. 9월

❍ 2014년 신규사업(휴천면소재지) 시행계획 수립 : 2014. 12월

❍ 휴천면소재지 종합정비 하드웨어사업 착공 : 2015. 2월

□ 기대효과

❍ 면 소재지의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 거점기능 강화

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

2014 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

조동지구 신규마을 조성사업

❍ 농촌지역에 쾌적하고 다양한 형태의 주거공간을 조성하여 도시민의 농촌유입을 촉진으로 농촌지역 활성화 도모

❍ 보산지구 전원마을의 성공적 사례를 바탕으로 우리군 특성에 맞는 마을을 조성하여 여유롭고 쾌적한 삶의 공가 제공

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 구룡리 662-10번지 일원

❍ 사업기간 : 2012 ∼ 2014년(3년)

❍ 사 업 량 : 전원마을 조성(면적 27,745㎡, 계획가구수 30세대)

❍ 사 업 비 : 총사업비 3,000백만원(사업비 1,800, 보상비 1,200)

재원	연도별 사업비(백만원)				비 고
	계	2012년	2013년	2014년
합 계	3,000 (1,200)	300 (300)	1,146 (900)	1,554	(보상비)
광 특	1,260	-	172	1,088
군 비	1,740 (1,200)	300 (300)	974 (900)	466

※ 재원비율(광특 70%, 군비 30%, 토지매입비 : 별도)

□ 추진실적

❍ 일반농산어촌개발사업(신규마을 조성) 신규사업 선정 : 2012. 5월

❍ 편입부지 보상 : 2012. 7. ∼ 2013. 12월

❍ 마을정비구역 지정 및 실시설계 용역 착수 : 2013. 2월

□ 추진계획

❍ 마을정비구역 지정 및 행정절차 이행 : 2013. 12월

❍ 사업착수 : 2014. 2월

❍ 사업완료 및 분양 : 2014. 12월

2014 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

소규모 농업용수 개발사업

가뭄상습지역에 저수지, 양수장, 용수로 등 수리시설을 설치하여    농촌용수를 확보·공급함으로써 식량의 안정적 생산기반 구축

□ 개    요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 일원

❍ 사업기간 : 2010 ∼ 2015년(6년)

❍ 사 업 량 : 저수지 신설(제당 L=145m, H=37m) ※ 저수량 : 219천톤

❍ 사 업 비 : 7,985백만원(광특 70%, 도비 15%, 군비 15%)

재원	연도별 사업비(백만원)				비 고
	계	2013년까지	2014년	2015년이후
합 계	7,985	6,558	736	691
광 특	5,590	4,556	515	519
도 비	1,198	1,001	110	87
군 비	1,197	1,001	111	85

□ 추진실적

❍ 기본조사 설계용역 완료 : 2011. 4월

❍ 실시 설계용역 완료 : 2011. 9월

❍ 시행계획 승인 : 2011. 10월

❍ 사업 착공 : 2011. 12월 9일

□ 추진계획

❍ 마평지구 소규모 농촌용수개발사업 완료 : 2015. 6월

❍ 마평 저수지 유지관리 계획 수립 : 2015. 6월

2014 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

오산지구 밭 기반 정비사업

❍ 생산기반이 취약한 집단화된 밭을 대상으로 기반시설 정비

❍ 밭작물의 생산성 향상과 품질개선으로 농가소득 증대 기여

□ 개    요

❍ 위    치 : 서상면 옥산리, 대남리 일원

❍ 사업기간 : 2010 ∼ 2015년(6개년)

❍ 사 업 량 : 암반관정개발 3개소, 농로 L=2.5km, 용수공급 1식

❍ 사 업 비 : 1,654백만원(광특 80%, 도비 10%, 군비 10%)

재원	년도별 사업비(백만원)				비 고
	계	2013년까지	2014년	2015년이후
합 계	1,653	1,100	226	327
광 특	1,323	880	180	263
도 비	165	110	23	32
군 비	165	110	23	32

□ 추진실적

❍ 기본계획 수립 : 2008. 10월

❍ 관정개발공사 완료 : 2011. 5월

❍ 1차년(토목) 공사 완료 : 2012. 6월

❍ 2차년(토목) 공사 완료 : 2013. 12월

□ 추진계획

❍ 3차년(토목)공사 완료 : 2014. 12월

❍ 편입부지 보상 : 2015. 2. ∼ 12월

2014 군정 주요업무

건설교통과 교통행정담당 ☏ 5194

대중교통시설물 개선 및 군 이미지 홍보

❍ 대중교통시설물(버스승강장)의 특색 있는 개선과 확충으로

대 군민 서비스 향상과 군 이미지 홍보 등 시너지효과 제고

❍ 교통수단별(버스, 택시) 외부광고 부착으로 홍보수단 활용

⇒ 군 상징 캐릭터, 농·특산물 등

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12월

❍ 사업량 및 사업비                                   (단위 : 천원)

사 업 명	단위	사업량	단가	사업비
계				265,100
버스승강장 설치	동	7	9,000	63,000
버스승강장 도색	동	17	500	8,500
전세버스 외벽 도색 및 홍보물 설치	대	7	3,700	25,900
택시 외부광고 제작	대	35	300	10,500
택시 외부광고 홍보비	대	118	1,200	141,600
버스외벽 함양군 관광 홍보	대	10	1,560	15,600

□ 추진계획

❍ 추진일정

- 설    계 : 2014. 1 ~ 2월

- 사업시행 : 2014. 3 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 버스승강장 설치 및 도색으로 이용객 편의 제공 및 깨끗한 도시      환경 조성

❍ 차량 외벽에 우리군의 상징물과 농·특산물을 도안한 광고물을

부착하여 우리지역 홍보 기여

2014 군정 주요업무

건설교통과 교통행정담당 ☏ 5194

운수업체 재정 지원사업

❍ 고유가, 자가용 차량 증가, 승객감소 등으로 농어촌버스 및

운수업계 적자운영

❍ 운영손실 재정지원으로 경영안정과 대중교통 활성화 도모

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12월

❍ 지원대상 : 운수업체(버스 42, 택시 118, 화물자동차 139)

❍ 지원사업비 : 2,234,103천원

❍ 사업량 및 사업비                                   (단위 : 천원)

사 업 명	업체수	사업량	사 업 비			비고
			계	도비	군비
계			2,234,103	430,352	1,803,751
벽지노선 손실보상금 지원	2	38개노선	620,103	173,352	446,751
버스업체 재정지원	2	-	514,000	257,000	257,000
유가보조금 지원	182	290대	1,100,000	-	1,100,000

※ 유가보조금 : 경유 등에 부과되는 교통세 등을 울산광역시에서 징수 후 시군 배분

□ 추진계획

❍ 벽지노선 손실보상금 및 버스업체 재정지원 : 분기 1회

❍ 유가보조금 지원 : 월 1회

□ 기대효과

❍ 농어촌버스업계 및 운수업체 재정난 완화

❍ 오지주민 및 교통약자 등 편의증진

❍ 운수업체 종사자 처우개선으로 서비스 질 향상

2014 군정 주요업무

건설교통과 교통행정담당 ☏ 5194

교통안전시설물 설치 및 관리

❍ 각종 교통안전시설물 설치 및 체계적인 유지관리로 교통사고

예방과 대주민 교통편익 증진 도모

❍ 보행자와 운전자의 안전사고 방지 및 쾌적한 교통환경 조성

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12월

❍ 사업량 및 사업비                               (단위 : 천원)

사 업 명	단위	사업량	단가	사업비
계				176,640
교통안전시설물 설치 및 정비	개소	50	500	25,000
교통신호등(경보등) 교체 및 신설	개소	1	15,000	15,000
교통신호기 유지보수 위탁관리	개소	111	240	26,640
태양광 싸이키 경광등 교체사업	개소	5	2,000	10,000
교통시설물(다기능 무인단속카메라) 설치	개소	2	50,000	100,000

□ 추진계획

❍ 각종 교통시설물 유지·보수 계약체결 : 2014년 1월

❍ 추진일정

- 설    계 : 2014. 1 ~ 3월

- 사업시행 : 2014. 4 ~ 12월

※ 교통안전시설물 설치사업 실시 : 연2회(상.하반기)

□ 기대효과

❍ 각종 교통안전시설물 유지관리 및 정비로 교통사고 예방 강화

❍ 보행자, 운전자, 대주민 등 교통부문 생활불편 해소

2014 군정 주요업무

건설교통과 교통행정담당 ☏ 5194

공영버스 확대 보급

❍ 주민의 벽지노선 운행 요청을 수용하기 위한 공영버스 추가 구입

❍ 차령만료 공영버스 구입의 부담 완화를 위한 순차적 구입

□ 공영버스 구입

❍ 공영버스 보유현황

계	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	비고
20	5	5	1	2	5	0	0	2

※ 차령만료 9년(2005년도 구입차량, 2년범위 연장 가능)으로 2014년 구입대상임.

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 286백만원

❍ 공영버스 구입대수 : 4대

- 공영버스의 차령 만료 대체 구입 : 2대

- 2013년 벽지노선 신청에 대한 검토 결과 수용을 위한 차량 구입 : 2대

□ 추진계획

❍ 벽지노선 운행노선 선정 및 차종 선정 : 2014. 1월

❍ 차량 구입 및 도색사업 : 2014. 2 ~ 3월

❍ 벽지노선 투입 및 운행 개시 : 2014. 4월

❍ 공영버스 차령만료 차령 검사, 대체차량 선정 : 2014. 6월

❍ 공영버스 차량 구입 및 투입 : 2014. 7 ~ 8월

□ 기대효과

❍ 벽지노선 추가 운행으로 대주민 교통서비스 향상

❍ 공영버스 구입 시기 조정으로 군비 부담 완화

2014 군정 주요업무

건설교통과 교통행정담당 ☏ 5194

교통약자 특별 교통수단 운영

❍ 교통약자의 이동편의 증진을 위한 특별교통수단의 운영으로

대주민 서비스 향상

❍ 특별교통수단의 조기 정착을 위한 직원 교육 실시

□ 개  요

❍ 특별교통수단(교통약자 콜택시)

구 분	차량운행 대수			위탁운영사	비 고
	계	2012년	2013년
그랜드 스타렉스 (개조형)	4	2	2	(합)함양콜택시 특별교통수단지점	2013. 6. 18일 개시

❍ 특별교통수단의 조기 정착을 위한 직원 교육 및 운영상황 점검

❍ 운영비 : 년120,000천원(1대당 30,000천원)

❍ 사업기간 : 2013. 6. 18 ~ 2015. 12. 31

□ 추진계획

❍ 특별교통수단 업체 사업계획서 접수 : 2014. 1월

❍ 교통약자 이동편의 증진위원회 운영 세칙 확정 : 2014. 1월말

❍ 특별교통수단 조기 정착을 위한 직원 교육 : 수시

❍ 특별교통수단 운영상황 점검 및 운영비 지급 : 2014. 3월 ~ 12월

❍ 특별교통수단 운영사업 결산 : 2015. 1월

□ 기대효과

❍ 교통약자의 이동편의 제공

❍ 교통약자의 교통이용 부담금 감소

	Ⅲ. 특수시책

2014 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

입주자 주도형 특색있는 신규마을조성사업

❍ 농촌지역에 쾌적하고 다양한 형태의 주거공간을 조성하여 도시민의

농촌 유입 촉진

❍ 기업이나 동우회, 예술인등이 마을조합 법인을 설립, 특색 있는

마을을 조성하여 기존마을과 유기적 결합을 통해 지역경제

활성화와 마을의 경제적 자립 도모

□ 개    요

❍ 위    치 : 마을정비조합 법인에서 작성한 제안서에 따라 선정

❍ 사업기간 : 2015 ∼ 2016년(2개년)

❍ 사 업 량 : 신규마을조성 A=20,000㎡이상(30세대 이상)

❍ 사 업 비 : 1,800백만원(기반시설 지원)

※ 부지 및 건축비는 입주자 부담

□ 추진계획

❍ 입주자 주도형 신규마을조성 사업계획서 공모: 2013. 9. ∼ 12월

❍ 입주자 주도형 신규마을조성사업 선정 : 2013. 12월

❍ 일반농산어촌개발사업(신규마을 조성) 신청 : 2014. 2월

❍ 마을정비구역 지정 및 실시설계 : 2015. 6월

❍ 사업시행 : 2015. 7. ∼ 2016. 11월

❍ 입    주 : 2016. 12월

□ 기대효과

❍ 기업이나 동우회, 예술인등이 주도, 특색 있는 마을을 조성하여  기존마을과 유기적 결합을 통해 지역 경제 활성화 기여

❍ 쾌적하고 다양한 형태의 주거공간을 조성하여 도시민의 농촌 유입 촉진

2014 군정 주요업무

건설교통과 교통행정담당 ☏ 5194

서상 다목적 공원 및 주차장조성 사업

❍ 현재 문태서 의병장 위패를 모시기 위해 조성된 사당이 위패를

옮겨간 후 방치되어 있으며,

❍ 면소재지 입구 유휴부지에 잡목 등이 많아 미관을 저해하고 있어

서상 다목적 공원 및 주차장 조성으로 면민의 편의 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서상면 도천리 1053-1번지 일원(서상중·고등학교 인근)

❍ 사 업 량 : 공원조성(2,500㎡), 주차장조성(4,000㎡), 진입로정비(L=120m),

배수로정비(L=400m), 담장철거 및 전석쌓기(L=100m) 등

❍ 사업기간 : 2014. 1 ∼ 12월(1년간)

❍ 사 업 비 : 170백만원

세부 사업명	사 업 량	사업비(천원)	비 고
계	7,120㎡	170,000
공원 조성	2,500㎡	30,000
주차장 조성	4,000㎡	80,000
진입로 정비	120m	10,000
배수로 정비	400m	15,000
담장 철거 및 전석쌓기	100m	15,000
군 관리계획 결정용역	1식	20,000

□ 추진계획

❍ 2014. 1월 : 학교용지 사용 협의

❍ 2014. 2월 ~ 3월 : 군 관리계획 결정

❍ 2014. 4월 ~ 5월 : 실시설계 및 주민설명회 개최

❍ 2014. 6월 : 사업 시행

❍ 2014. 9월 : 사업 완료

□ 기대효과

❍ 공원화를 통한 주민들의 휴식공간 및 여가활용 공간으로 이용

❍ 각종 주요 행사시 부족한 주차 공간 해소