안 전 관 리 과

Ⅰ. 2014 업무추진 방향

Ⅱ. 2014 주요업무 계획

□ 재난예방·점검활동 강화

□ 어린이 안전체험학습장 운영

□ 자연재해 위험지구 개선사업

□ 서민밀집 위험지역 정비사업

□ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

□ 소하천 재해예방사업

□ 소하천정비 종합계획수립(재정비)

□ 위천 생태하천 조성사업

□ 구룡천 고향의 강 조성사업

□ 생활속의 민방위 육성

□ 완벽한 가로등 관리로 밝은 함양거리 조성

Ⅲ. 특수시책

□ 1천 1교 사랑운동

Ⅰ		2014 업무추진 방향

재난대비 및 수습 시스템 구축으로 행복군정 실현

	목 표
재난관리 기본체계 완성 재난대비 및 수습 시스템 구축 자연친화적 하천관리 생활속의 민방위대 조직 육성 시가지, 농촌가로등, 보안등 통합관리
	중점과제
재난예방·점검활동 강화 자연재해 사전대비 하천 유지관리 및 소하천 정비 생활속의 민방위대 조직 육성 완벽한 가로등 관리로 밝은 함양거리 조성

	Ⅱ. 2014 주요업무 계획

2014 군정 주요업무

안전관리과 안전관리담당 ☏ 5201

재난예방·점검활동 강화

❍ 군민이 동참하는 안전점검으로 재난예방활동 효과 제고

❍ 안전을 최우선으로 하는 군민의식 함양

□ 개    요

❍ 안전관리계획 수립으로 재난 예방 및 대비

❍ 재난 예방을 위한 안전문화운동 추진 및 군민 교육․홍보 강화

❍ 실효성 있는 사전 안전점검 활동 전개

□ 추진계획

❍ 안전점검의 날 운영

- 매월 4일 안전점검의날 운영시 재난취약지역 안전점검 병행 실시

❍ 안전문화운동 활성화 : 함양군 안전문화운동 추진 협의회 구성 운영

❍ 특정관리대상 시설 안전점검 및 관리 : 115개소

❍ 여름철 물놀이 안전관리

- 물놀이 관리지역 안전관리요원 배치

11개 지역 14명, 119시민수상구조대 20명

❍ 재난대응 안전한국훈련 실시

□ 기대효과

❍ 재난관련 기관․단체, 위원회 참여확대

❍ 재난예방을 위한 점검 시 군민 참여 분위기 조성

2014 군정 주요업무

안전관리과 안전관리담당 ☏ 5201

어린이 안전체험학습장 운영

어린이들에게 빈번히 발생하는 각종 안전사고의 예방교육과 체험학습을   통하여 안전사고에 스스로 대처할 수 있는 자생력 제고

□ 개    요

❍ 위   치 : 함양군 함양읍 용평리 (하림공원 내)

❍ 학습장 면적 : 6,900㎡

- 야외교육장, 자전거도로, 목재육교, 생태터널

- 풍수해 및 소방 체험장

□ 추진계획

❍ 운영기간 : 춘기(4월~6월), 추기(9월~10월)

❍ 교육목표 : 연간 1,000여명

❍ 교육대상 : 관내 및 인근지역 유치원, 초등학생

❍ 교육내용

- 교통안전표지판, 교통신호등 익히기

- 교차로, 횡단보도 건너기 체험

- 자전거타기 실습

- 풍수해 및 소방 체험

- 심폐소생술 체험

□ 기대효과

❍ 어린이 안전의식 조기형성 및 안전체험 학습의 장 마련

❍ 안전체험교육으로 안전문화 홍보 및 안전의식 제고

2014 군정 주요업무

안전관리과 복구지원담당 ☏ 5202

자연재해 위험지구 개선사업

❍ 자연재해 위험지구에 대한 근원적인 예방대책 필요

❍ 상습침수지구 재해위험요인을 체계적, 지속적으로 정비관리

□ 사업개요

❍ 사업현황

지구명	위치	사업량	사업비 (백만원)	사업기간
추하지구	서상면 금당리	축제 및 호안 L=1.4km	7,495	2012.12～2014.12

❍ 연도별 투자계획                                   (단위:백만원)

지구명	재원별			연도별 투자현황
	계	국비(60%)	도비(40%)	2012까지	2013	2014
추하지구	6,981	4,189	2,792	1,020	3,400	2,561

□ 추진실적

❍ 추하지구

- 사업착공 : 2012. 12월

- 축제및호안1km, 보3개소, 이설도로620m

□ 향후 추진계획

❍ 2014년 시행사업 우기이전 주요공정 마무리

❍ 2014년 12월 사업 완료

2014 군정 주요업무

안전관리과 복구지원담당 ☏ 5202

서민밀집 위험지역 정비사업

❍ 주택가 재해위험지역을 정비하여 인명피해 예방

❍ 인명피해가 발생했던 지역의 체계적 정비 및 위험요인 해소

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 강청, 해평지구 서민밀집위험지역 정비사업

❍ 위    치 : 마천면 강청리, 서하면 운곡리

❍ 사 업 량 : 배수로 L=2km

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000, 지방비 1,000)

❍ 사업기간 : 2014. 3월 ~ 2014. 12월

□ 추진계획

❍ 사업내용

- 배수로 L=2.0km

❍ 추진일정

- 주민설명회 개최 : 2014. 2월

- 사업착공 : 2014. 3월

- 주요공정 완료 : 2014. 6월

□ 기대효과

❍ 대규모 재해로부터 인명 및 재산피해 예방

❍ 재해위험요인 해소로 안정적인 생활환경 제공

2014 군정 주요업무

안전관리과 복구지원담당 ☏ 5202

급경사지 붕괴위험지역 정비사업

급경사지 붕괴위험지역 정비로 인명 및 재산피해 예방

□ 사업개요

❍ 사업현황

지구명	위치	사업량	사업비 (백만원)	사업기간
가흥지구	마천면 가흥리	토석제거 Q=150,000㎥	5,688	2014. 3.～2015. 12.

❍ 연도별 투자계획                                   (단위:백만원)

지구명	재원별				연도별 투자현황
	계	국비(50%)	지방비(50%)		2013까지	2014	2015
			도비	군비
가흥지구	5,668	2,834	1,134	1,700	470	1,000	4,198

□ 추진실적

❍ 2013. 5월 : 설계완료

□ 추진계획

❍ 2014. 1월 : 설계심사

❍ 2014. 3월 : 사업발주

❍ 2014. 6월 : 우수기 이전 주요공정 완료

❍ 2014. 12월: 사업완료

□ 기대효과

❍ 대규모 재해로부터 인명 및 재산피해 예방

❍ 재해위험요인 해소로 안정적인 생활환경 제공

2014 군정 주요업무

안전관리과 하천담당 ☏ 5203

소하천 재해예방사업

❍ 수해피해 발생 및 우려지구의 하천정비로 피해예방과 하천 환경개선

❍ 치수 및 친환경적 하천조성으로 생태계 보전과 지역주민생활편의 제공

□ 사업개요

❍ 하 천 명 : 국계소하천 외 2개소

❍ 사 업 량 : L = 6.65Km

❍ 사 업 비 : 14,692백만원 (국비50%, 군비50%)

❍ 사업기간 : 2012. 1월 ~ 2016. 12월

❍ 사업비 투자계획

하 천 명	위 치	구분	사업량 (km)	사 업 비(백만원)				비고
				계	2013까지	2014	2015이후
계			6.65	14,692	7,945	3,871	2,876
국계 소하천	유림면 국계리	계속	2.85	5,691	4,000	1,691		2014 마무리
구산ㆍ비조소하천	백전면 구산리	계속	2.65	5,725	3,945	1,780		2014 마무리
서백 소하천	백전면 동백리	신규	1.15	3,276		400	2,876

□ 추진계획

❍ 조사측량 및 실시설계 : 2012.1월(국계/구산비조), 2014.3월(서백)

❍ 보상협의 : 2012. 1월 ~ 2014. 6월

❍ 사업착공 : 2012.1월(국계/구산비조), 2014.3월(서백)

❍ 사업완료 : 2014.12월(국계/구산비조), 2016. 12월(서백)

□ 기대효과

❍ 수해피해 예방과 하천환경 개선

2014 군정 주요업무

안전관리과 하천담당 ☏ 5203

소하천정비 종합계획수립(재정비)

❍ 소하천의 효율적인 이용, 관리, 보존과 일관된 정비계획 수립으로

❍ 자연적, 인위적인 여건 변화에 따라 소하천 주변 주민의 복리증진과      소하천 개발지침 확립

□ 사업개요

❍ 대    상 : 관내소하천(202개소)

❍ 사 업 량 : L=255.64㎞

❍ 사 업 비 : 3,476백만원(국비50%, 군비50%)

❍ 사업기간 : 2011. 3. 16. ~ 2015. 1. 8.(4년간)

❍ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

계(총괄)		기 시행		2014년		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=255km	3,476	조사측량	2,750	행정계획	726

□ 추진실적

❍ 소하천정비 지정 및 해지 대상지 확정 : 2011. 12월

❍ 2013년분 사업착공 : 2013. 1월

❍ 조사측량 및 도면작성 : 2012. 1월 ~ 2013. 5월

❍ 주민설명회 : 2013. 6월 ~ 2013. 10월

□ 추진계획

❍ 관련기관 협의 및 승인 : 2014. 1월 ~ 2014. 10월

❍ 용역준공 : 2015. 1월

□ 기대효과

❍ 현장 여건에 부합하는 소하천정비 종합계획을 재수립하여 소하천 주변주민의 복리증진에 기여

❍ 소하천 재해예방사업 시행에 따른 법적근거 확보로 국비확보 용이

2014 군정 주요업무

안전관리과 하천담당 ☏ 5203

위천 생태하천 조성사업

아름다운 자연형 생태하천 복원과 동시에 군민의 재산 보호 및 아름다운 하천으로 정비

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 함양 위천 생태하천 조성공사

❍ 위    치 : 함양읍 죽곡리(솔숲) ~ 이은리(인당교)

❍ 사 업 량 : L=3.4km

❍ 사 업 비 : 30,944백만원(국비60%, 도비16%, 군비24%)

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2015년(7개년)

❍ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기 시행	2014년	2015년	비고
사 업 비	30,944	13,827	6,570	10,547
사 업 량	하천정비 L=3.4㎞	하천정비 L=3.0㎞	교량1개소 (두루침교)	하천정비 L=0.4㎞ 교량 1개소

□ 추진실적

❍ 사업착공 : 2010. 12. 22(총괄 → 장기계속공사)

❍ 함양 위천 하천정비 기본계획 고시 : 2012. 1. 19.

❍ 총사업비 변경협의 완료, 158억원 →  309억원(증151억원) : 2012. 11. 5.

❍ 사업비 증액 설계변경 완료 : 2013. 1. 21.

□ 추진계획

❍ 보상협의 : 2014. 1월 ~ 2014. 6월(두루침교 편입부지)

❍ 사업착공 : 2014. 2월

□ 기대효과

❍ 아름다운 자연형 생태하천 조성과 동시에 군민의 재산을 보호하고  사람과 하천이 서로 공존할 수 있는 아름다운 하천 정비

2014 군정 주요업무

안전관리과 하천담당 ☏ 5203

구룡천 고향의 강 조성사업

구룡천을 치수, 이수환경, 생태복원과 역사와 문화가 흐르는 강으로 복합 정비하여 가보고 싶은 하천환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 난평리 신기교 ~ 이은리

❍ 사 업 량 : 고향의 강조성 2.3㎞, 하천기본계획수립 3.6㎞

❍ 사 업 비 : 14,888백만원(국비 8,932, 도비 1,786 군비 4,170)

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2017(5개년)

❍ 사업비 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	기 시행	2014년	2015년이후	비고
사 업 비	14,888	1,333	2,313	11,242
사 업 량	하천정비 L=2.3㎞ 교량2개소	기본계획변경 실시설계 1식	용지보상 1식 하천정비 L=0.5㎞	하천정비 L=1.8㎞ 교량 2개소

□ 추진실적

❍ 구룡천 하천정비기본계획(변경)수립완료 : 2013. 12. 5.

❍ 실시설계 완료 : 2013. 12월

□ 추진계획

❍ 실시계획인가 : 2014. 2월

❍ 사업착공 : 2014. 2월

❍ 사업준공 : 2017. 12월(공사기간 4년)

□ 기대효과

❍ 하천개량으로 지역주민과 친숙한 공간 조성

❍ 함양의 지역적 특성을 부각하여 함양의 브랜드 가치 제고

2014 군정 주요업무

안전관리과 민방위담당 ☏ 5204

생활속의 민방위 육성

❍ 재난에 대처 할 수 있는 실질적인 민방위 교육과 훈련을

실시하여 유사시에 활용 가능한 민방위대로 조직을 관리

❍ 각종 사태에 대비하는 민방위 시설·장비의 완벽한 관리

□ 개    요

❍ 민방위대 조직 관리 ·운영(81개대/2,379명)

❍ 재난유형별 사례를 중심으로 민방위 교육훈련 실시

❍ 비상시에 대비하는 민방위 시설 ·장비의 일상적 관리

□ 추진계획

❍ 내    용

- 안보교육 및 체험위주의 실전 교육 강화

- 재난대처 민방공 대피, 재난대비 방재훈련실시(연중)

- 민방위 사태를 대비한 민방위 시설·장비의 적정관리

❍ 추진일정

- 안보교육 및 체험위주의 실전 교육강화 및 자체훈련 실시

- 민방위 사태를 대비한 민방위 시설·장비의 적정관리

·  대피시설 12개소, 비상급수시설 2개소, 민방위장비 2,900점

· 분기 및 수시점검 후 물자 대체지정 및 보급

□ 기대효과

❍ 생활속의 민방위 육성으로 유사시 활용 가능한 능력배양

❍ 민방위 시설․장비 관리로 재난대처 능력 향상

2014 군정 주요업무

안전관리과 민방위담당 ☏ 5204

완벽한 가로등 관리로 밝은 함양거리 조성

❍ 고장 및 신·이설 가로등의 신속한 정비로 주민불편을  최소화 하고

관리비 절감과 재해예방

❍ 깨끗하고 밝은 함양의 이미지 창출을 위한 가로등 관리

□ 개    요

❍ 가로등 고장 신·이설 등 신속한 민원처리로 주민불편 최소화

❍ 노후 가로등 적기 정비로 사고예방 및 밝은 도심 거리조성

□ 추진계획

❍ 가로등 관련 주민불편 민원 신속한 처리 (157백만원)

- 가로등 사전점검 실시로 주민불편 예방(가로등 4,348개소)

- 시가지 가로등 나트륨 등을 에너지차원 CDM으로 점차 교체(200등)

❍ 타부서 설치 가로등 관리

- 대    상 : 도시계획, 공원, 관광지, 타부서 설치 가로등

- 관리방안 : 기존시설 보수지원, 신규사업 설계, 시공, 준공에 참여

□ 기대효과

❍ 가로등 신․이설시 주민의견을 적극 수렴하고, 가로등 고장시    신속한 고장수리로 군정에 대한 만족도 향상에 기여

❍ 노후가로등 정비로 주민 불편해소 및 감전 등 안전사고 예방

	Ⅲ. 특수시책

2014 군정 주요업무

안전관리과 하천담당 ☏ 5203

1천 1교 사랑운동

1천 1교 사랑운동을 통해 함양의 아름다운 하천환경을 널리 알리고 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

❍ 현재 추진중인 위천 생태하천 조성사업(2015년 준공)과 한들 생태하천 복원사업(2014년 준공)이 준공되면 함양 도심의 하천자연이 복원됨

❍ 지역학교와 연계한 1천 1교 사랑운동을 전개하여 어린이들에게 하천환경의 소중함을 키워주고 쾌적한 환경 조성

□ 추진계획

❍ 교육기관(함양교육청)과 협의체 구성

❍ 결연 지정된 하천에 정기적 탐방 및 견학을 실시해 수생태 체험

학습장으로 활용

❍ 쓰레기 줍기 등의 정화운동 실시

❍ 향후 안의면 남강천 등에 확대전개

❍ 매년 평가를 통해 시상(표창, 감사장)

❍ 위치별 담당학교

하천명	위치	연장	지정 결연학교	비고
위천	함양솔숲 ～ 고운교	L: 0.5km	위림초등학교
〃	고운교 ～ 돌북교	L: 0.5km	함양초등학교
〃	돌북교 ～ 두루침교	L: 0.4km	함양중학교
〃	두루침교 ～ 인당교	L: 0.6km	함양고등학교
한들천	함양여중 ～ K마트	L: 0.5km	함양여중
〃	K마트 ～ 위성초	L: 0.5km	위성초등학교
〃	위성초 ～ 하림공원	L: 0.5km	제일고등학교

□ 기대효과

❍ 함양의 우수한 하천생태계를 현지 학생들에게 제공

❍ 하천정화 활동을 통한 물 사랑 운동 전개