상하수도사업소

Ⅰ. 2015 업무추진 방향

Ⅱ. 2015 주요업무 계획

□ 마을상수도시설 운영 및 유지관리

□ 마을상수도 노후관로 교체

□ 소규모 수도시설 개량정비

□ 안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충

□ 함양군 지방상수도 유수율 제고

□ 갈수기 안정적인 생활용수 공급

□ 함양 지방상수도 급수구역 확장

□ 함양·안의 정수장의 효율적 유지관리

□ 수질개선을 위한 하수처리시설 설치

□ 안정적 하수처리를 위한 하수관거 정비

□ 쾌적한 농어촌마을 환경조성

□ 공공하수처리시설 운영 및 유지관리

Ⅲ. 특수시책

□ 우리집 수돗물 안심확인제 시행

Ⅲ		2015 업무추진 방향

맑고 깨끗한 상하수도 관리로 삶의질 향상

	목 표
깨끗하고 안정적인 맑은물 생산 공급 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성 마을상수도 시설의 안정 공급시스템 구축
	중점과제
지방상수도 급수구역 확대유지로 안정적인 맑은물 공급 유수율 제고사업 및 하수처리시설 확대사업 유치 노력 마을상수도 유지관리로 생활용수의 안정적 공급 상하수도관리 중장기 계획에 의한 체계적인 관리 방안 마련

	Ⅱ. 2015 주요업무 계획

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 관리담당 ☏ 5231

마을상수도시설 운영 및 유지관리

농촌지역의 인구 노령화에 따른 전문업체 위탁관리와 천재지변 및 노후로 인한 시설물의 긴급한 보수, 정기 및 수시 수질검사 시행으로 군민에게 안정된 생활용수 공급

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 마을상수도 268개소

❍ 사 업 비 : 796백만원(도비 : 59백만원, 군비 : 737백만원)

구 분	위 치	사업량	사 업 비(백만원)				비고
			계	국비	도비	군비
계			796	-	59	737
위탁관리	전 읍□면	268	461	-	59	402
긴급보수	전 읍□면	268	200	-	-	200
수질검사	전 읍□면	268	135		-	135

□ 추진계획

❍ 마을상수도 위탁관리

- 추진일정 : 2015. 1월 ~ 12월

❍ 마을상수도 긴급보수

- 추진일정 : 2015년 년중

❍ 마을상수도 수질검사

- 수질검사 정기 및 수시 시행으로 안정된 생활용수 공급

- 추진일정 : 2015. 1월 ~ 12월

2015 군정 주요업무

마을상수도 노후관로 교체

상하수도사업소 관리담당 ☏ 5231

노후 및 누수로 인해 불편을 겪고 있는 마을상수도 관로를 교체하여 생활용수의 안정적 공급과 군민 삶의 질 향상 기여

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 11월

❍ 사 업 량 : 노후 관로교체 4개소

❍ 사 업 비 : 150백만원(군비)

□ 추진계획

❍ 마을상수도 노후관로 : 누수율 저감과 안정되고 깨끗한 생활용수 공급

- 2015. 1월 ~  3월 : 실시설계 및 주민설명회

- 2015. 3월 ~ 11월 : 사업 시행 및 완료

- 사업내용                                            (단위:백만원)

구 분	위 치	사업량	사 업 비		비고
			계	군비
계	4개소	L= 2.3km	150	150
덕암	지곡면 덕암리	L= 1.0km	70	70
오평	지곡면 개평리	L= 0.3km	20	20
하비	안의면 하원리	L= 0.5km	30	30
수여	지곡면 마산리	L= 0.5km	30	30

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 관리담당 ☏ 5231

소규모 수도시설 개량정비

노후, 원수부족, 수질불량 시설에 대한 개량 정비로 생활용수의 안정적 공급과 군민 삶의 질 향상 기여

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 11월

❍ 사 업 량 : 소규모수도시설 개량 5개소

❍ 사 업 비 : 714백만원(국비 : 500백만원, 군비 : 214백만원)

□ 추진계획

❍ 소규모수도시설 개량 : 풍부하고 깨끗한 생활용수 공급 및 주민 불편 해소

- 2015. 1월 ~  3월 : 실시설계 및 주민설명회

- 2015. 3월 ~ 11월 : 사업 시행 및 완료

- 사업내용                                              (단위:백만원)

구 분	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계	5개소	L= 7.6km	714	500		214
관동	함양읍 난평리	L= 2.0km	174	122	-	52
가채	마천면 가흥리	L= 1.0km	120	84	-	36
진관	휴천면 태관리	L= 1.0km	100	70	-	30
국계	유림면 국계리	L= 1.0km	120	84	-	36
개평	지곡면 개평리	L= 2.6km	200	140	-	60

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충

❍ 안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충으로 서상․서하․안의지구에      원활한 지방 상수도 공급 및 확충

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 서상·서하·안의면 일원(3개면, 52마을, 7,800명)

❍ 사업기간 : 2006. 12월 ~ 2017. 12월

❍ 사업계획

단위사업	사 업 량			사 업 비(억원)			비고
				계	광특	지방
서상농어촌 지방상수도 개발사업	대남저수지 V = 643,000㎥	정수시설 3,700㎥/일	관로시설 74㎞	460	284	176
서상농어촌 급수구역 확충사업	배수지 1개소 V = 1,800㎥	가업장 6개소	관로시설 44㎞	101	71	30

□ 추진계획

❍ 서상농어촌 지방상수도개발사업 : 서상면, 서하면, 안의면 지방 상수도 미급수지역에 상수도 급수를 위한 배수관로 및 서상, 안의, 함양 정수장 통합시스템구축 사업

- 사 업 량 : 가압장 6개소, 배수관로 17.6km, 함양정수장 통합시스템 구축

- 사업기간 : 2015. 2월 ~ 12월

- 사 업 비 : 5,000백만원

❍ 서상농어촌 급수구역 확충사업 : 서상면, 서하면, 안의면 지방 상수도 미급수지역에 상수도 급수를 위한 급수관로 설치사업

- 사 업 량 : 급수관로 8km

- 사업기간 : 2015. 2월 ~ 12월

- 사 업 비 : 733백만원

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

함양군 지방상수도 유수율 제고

❍ 상수도 관로의 노후 및 파손 등 누수로 인한 생활불편 해소

❍ 하수관거 BTL사업과 병행하여 예산절감, 공사기간단축

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 지방상수도 급수구역 전체

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2019년(10년)

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계		기투자		2015년도		2016이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		25,505		3,305		800		21,300
노후관로 개량	20.4㎞	3,845	16.4km	3,045	2.0km	200	2.0	400
하수관거 BTL사업 병행	34㎞	21,200	-	-	5.0km	500	29km	20,800	군비 부담액
누수탐사 용역	1식	460	1식	260	1식	100	1식	100

□ 추진계획

❍ 노후개량사업 : 노후관로 교체로 유수율 향상

- 사 업 량 : 노후관로 개량 2.0km

- 사업기간 : 2015. 2월 ~ 12월

- 사 업 비 : 200백만원

❍ 하수관거 BTL병행사업 : 노후관로 교체를 하수관거 BTL사업과 병행하여 예산절감

- 사 업 량 : 노후관로 개량 5.0km

- 사업기간 : 2015. 2월 ~ 12월

- 사 업 비 : 500백만원

❍ 누수탐사용역 : 누사탐사 실시하여 신속한 복구로 민원불편 최소화        - 사 업 량 : 누수탐사용역 1식

- 사업기간 : 2015. 2월 ~ 12월

- 사 업 비 : 100백만원

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

갈수기 안정적인 생활용수 공급

❍ 갈수기 원수부족 및 봄철 영농작업에 오염물질 유입으로 정수에        애로가 있어 보조수원지 확장으로 안정적 원수 확보

❍ 수동지역 급수구역 확대로 및 사용량 증가에 따라 배수지 용량 증설하여

상수도의 안정적 공급으로 주민 생활불편 해소

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2013. 2월 ~ 2016. 11월

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계		기투자		2015년도		2016이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
지방상수도 보조수원지 확장사업	5..2㎞	1,200	1.2km	560	2.0km	100	1.0	540
수동배수지 증설사업	배수지 1개소	260	-	-	배수지 1개소	10	-	250

※ 지방상수도 보조수원지 확장사업(병곡 월암 금당골 소류지 : 5,600㎥)

□ 추진계획

❍ 지방상수도 보조수원지 확장 : 갈수기 대비 보조수원지 확보

- 사업량 : 관로신설 2.0km(D350 L=1.0km, D200 L=1.0km)

(뇌계공원 ~ 도천마을)

- 공사기간 : 2015. 2월 ~ 11월

- 사 업 비 : 100백만원

❍ 수동배수지 증설사업 : 수동급수지역 확대에 따른 배수지 증설

- 사업량 : 물탱크 V=300㎥

- 공사기간 : 2015. 1월 ~ 12월

- 사 업 비 : 10백만원

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

함양 지방상수도 급수구역 확장

❍ 기후변화로 인한 지하수 고갈 및 수질오염에 대비, 지방상수도      확대 공급으로 주민불편 최소화

❍ 수도정비기본계획에 따른 단계별 확대로 지방상수도 보급률 향상

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 10월

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

위치	가구수	사업량	사업비	수도정비 기본계획	비고
계	103	L=2.5km	100
지곡면 개평마을	103	L=2.5km	100	1단계 (2010년부터)	마을 상수도

※ 현재까지 확장실적( 42억원, 15개마을 1,472명)

□ 추진계획

❍ 2014.  12월 : 사업대상지 사전 조사

❍ 2015. 1~3월 : 실시설계, 도로굴착 심의

❍ 2015. 4~10월 : 사업시행 및 준공

❍ 수압시험 및 지방상수도 급수(2015. 11월 급수개시 예정)

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

함양 ․ 안의 정수장의 효율적 유지관리

❍ 수도법 제74조에 의거 5년마다 정수장 기술진단토록 되어 있어

❍ 기술진단결과 보강이 필요한 사업에 대하여 군민이 맑게 깨끗한

수돗물을 먹는데 지장이 없도록 보수 및 보강코자 함

□ 개 요

❍ 기술진단 실시

- 기    간 : 2014. 2. 19 ~ 8. 17

- 대    상 : 함양·안의정수장

- 용역업체 : 한국수자원공사

- 용 역 비 : 207백만원

❍ 기술진단 실시 결과(보강대상)

- 함양 정수장 : 263백만원(취수펌프 흡입 및 토출압력계 교체외 18건)

- 안의 정수장 : 15백만원(취수장 흡수정 토사준설외 8건)

□ 추진계획

❍ 함양·안의정수장 보수 및 보강사업

- 위    치 : 함양읍, 안의면

- 사업기간 : 2015. 1월 ~ 12월

- 사 업 량 : 함양정수장 6건, 안의정수장 3건

- 사 업 비 :  74백만원(함양 70백만원, 안의 4백만원)

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

수질개선을 위한 하수처리시설 설치

4대강 중점관리 구역 내 하수처리시설에 대한 방류수 수질기준 강화

및 생활수준 향상에 따른 하수발생량 증가 대비

□ 개  요

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 하수처리장

❍ 사업기간 : 2012. 1월. ~ 2015. 12월(계속사업)

❍ 사 업 비 : 6,418백만원(국비 2,598 도비 520 군비 3,300)

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비		기투자		2015년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	처리시설 (증설) 2,600㎥/일	6,418	실시설계1식 처리시설 (증설)	5,718	처리시설 (증설)	700
국비		2,598		2,598
도비		520		520
군비		2,078		2,078
소계	시설개량 1식	1,222	시설개량 1식	522	시설개량 1식	700
군비		1,222		522		700

□ 추진계획

❍ 하수처리시설 설치 : 하수처리시설 설치로 쾌적한 환경조성 및 수질개선

- 사 업 명 : 함양 공공하수처리시설 증설사업

- 사 업 량 : 증설 2,600㎥/일(7,000㎥/일 ⇒9,600㎥/일)

- 그동안 추진실적

·기본 및 실시설계 : 2010. 6월

·처리장 부지매입 : 2011. 5월

·사업인가 및 재원협의 : 2014. 9월

·사업 시행 : 2014. 10월

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

안정적 하수처리를 위한 하수관거 정비

하수관거를 우·오수 분리하여 하수처리함으로 수처리 효율성 향상 및

주거환경 개선

□ 개  요

❍ 위    치 : 함양읍 시가지

❍ 사업기간 : 2014. 7월 ~ 2017. 9월

□ 추진계획

❍ 하수관거 정비 : 하수관거 우·오수 분리하여 안정적 하수처리 및 수처리 효율성 향상

- 사 업 명 : 함양 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

- 위    치 : 함양읍 함양처리분구

- 사업방식 : 민간투자사업 방식(Build-Transfer-Lease)

- 사 업 비 : 35,242백만원

- 사 업 량 : 관거정비 L=34.4km, 배수설비 2,737가구

초기우수저류시설 1개소(4,000㎥)

- 공사기간 : 착공일로부터 26개월

※ 사업시행 예정일 : 2015. 5월

- 운영기간 : 운영개시일로부터 20년간

- 사업시행자 : (가칭)함양에코라인 주식회사 주간사 고려개발(주)

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

2015 군정 주요업무

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

쾌적한 농어촌마을 환경조성

❍ 남강댐 상류지역 물 자원의 효율적 운용관리로 공공수역 수질향상

❍ 생활 필수 기반시설인 하수도정비로 주민의 삶의 질 향상

□ 개    요

❍ 위    치 : 지곡면 덕암리(덕암·오평마을)

❍ 사업기간 : 2014. 11월. ~ 2016. 11월(계속사업)

❍ 사  업  비 : 1,600백만원(국비 1,120 도비 240 군비 240)

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비		기투자		2015년		2016년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	처리장 45㎥/일 관로 5.6km	1,600	처리장 45㎥/일 관로 1.6km	572	관로 2.0km	479	관로 2.0km	549
국비		1,120		400		335		385
도비		240		86		72		82
군비		240		86		72		82

□ 추진계획

❍ 덕암마을 하수도 설치사업 : 하수처리시설 설치로 농어촌마을의 쾌적한 환경조성

- 사 업 량 : 하수처리장 Q=45㎥/일, 관로 2.0㎞

- 그동안 추진실적

· 기본및 실시설계 : 2010. 6월

· 처리장 부지매입 : 2011. 5월

· 사업인가 및 재원협의 : 2014. 9월

· 사업 시행 : 2014. 10월

2015 군정 주요업무

공공하수처리시설 운영 및 유지관리

❍ 노후관로 개량 및 맨홀펌프장, 관로준설을 통한 민원해소

❍ 공공수역의 수질보전으로 청정함양 이미지유지 및 삶의 질 향상

□ 개 요

❍ 대   상 : 공공하수처리시설 50개소

- 공공하수도(함양, 안의, 수동) : 8,700㎥/일

- 소규모처리장(47개소) : 3,456㎥/일

□ 추진계획

❍ 공공하수처리시설 운영 : 안정적 공공하수처리시설 운영관리 및

공공수역 수질보전

- 하수도시설 위탁운영 및 유지관리

·사 업 비 : 3,326백만원( 기금 1,145 군비 2,181)

·사업계획                                                  (단위 : 백만원)

세부 사업명	사 업 량	사업비	비고
계		3,326
공공하수처리 위탁운영	시설 유지관리 1식	1,841
노후시설 개보수	개보수․시설관리 1식	520
시설 일반운영	전기․슬러지․법정검사 등	865
통합시스템 운영관리	유지관리․보수비 1식	100

❍ 공공하수도 유지관리 : 주기적인 시설관리로 원활한 하수운영

- 사 업 비 : 220백만원

- 사업계획                                           (단위 : 백만원)

구 분	총사업비		기투자		2015년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
군 비	유지관리 1식	2.872	유지관리 1식	2,652	유지관리 1식	220

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

	Ⅲ. 특수시책

2015 군정 주요업무

우리집 수돗물 안심확인제 시행

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

수돗물 수질이 궁금한 군민이면 누구나 인터넷이나 전화로 수질검사를 신청하면 담당공무원이 각 가정을 방문하여 무료로      수도꼭지 수질검사를 실시

□ 개    요

❍ 대    상 : 함양군 지방상수도 급수구역 군민

❍ 신청접수 : 월 50건 정도예상

❍ 신청방법 : 인터넷 및 전화로 수질검사 신청

❍ 처리기간 : 15일

❍ 수질검사 항목 : 철외 10개 항목

□ 추진계획

❍ 2014. 10월 : 물사랑 홈페이지 정비(환경부)

- 우리집 수돗물 안심 확인제 시스템 정비

❍ 2014. 10월  : 시책홍보

- 홈페이지, 지역신문, 반상회보, 이장회의, 각종회의 등

❍ 2014. 10월 ~ 12월 : 시범운영

❍ 2015년 1월 : 우리집 수돗물 안심 확인제 확대시행

□ 기대효과

❍ 군민들의 지방상수도 수질에 대한 막연한 불안감 해소

❍ 무료 수질검사를 실시하여 안전하고 믿을 수 있는 수돗물 공급