안 전 건 설 과

Ⅰ. 2017 업무추진 방향	175

Ⅱ. 2017 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 군민 참여형 안전점검 실시	179

□ 가흥3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	180

2. 역점(특수)시책

□ 시가지 옛길 생활기반 조성사업	181

□ 이은~난평간도로 확․포장공사	182

□ 상림산책로(운죽선) 조성사업	183

□ 소하천 정비사업	184

3. 일반계속사업

□ 선제적 재난예방 대책	185

□ 주민숙원사업 시행	186

□ 군도 확․포장사업	188

□ 농어촌도로 확․포장사업	189

□ 대방~중기간 도로 확․포장공사	190

□ 농업기술센터 진입도로 개설공사	191

□ 자연재해 재해위험지구 정비사업	192

□ 자연친화적 하천관리 사업	193

□ 일반농산어촌 개발사업	194

□ 재해위험저수지 정비사업	196

Ⅰ		2017 업무추진 방향

재난대응체계 확립 및 건실한 건설사업시행

	전략목표
□ 재난·안전관리 역량 강화 □ 예방중심의 안전관리 체계 구축 □ 군민과 함께하는 안전문화 정착 □ 주민숙원사업 시행으로 지역주민 편익증대 □ 도로망 확충으로 지역 균형개발 □ 재해복구 및 재해예방사업 투자 확대 □ 자연친화적 하천관리 □ 지역농촌의 특색을 살린 지역개발과 농업기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상
	단위사업
① 군민 참여형 안전점검 실시 ② 주민숙원사업 시행으로 지역주민 생활 편익증대 ③ 군도 확․포장사업 ④ 농어촌도로 확․포장사업 ⑤ 대방~중기간(지방도 742호)도로 확․포장공사 ⑥ 농업기술센터 진입도로 개설공사 ⑦ 가흥3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 ⑧ 소하천 정비사업 ⑨ 선제적 재난예방 대책 ⑩ 자연재해 위험지구 정비사업 ⑪ 자연친화적 하천관리사업 ⑫ 일반농산어촌 개발사업 ⑬ 재해위험 저수지 정비사업

	Ⅱ. 2017 주요업무 계획

1

1

군민 참여형 안전점검 실시

안전관리담당 ☏ 5201

신규사업

❍ 안전문화 의식 제고로 재해위험 및 안전 위해요소 사전제거

❍ 노후건축물 안전점검을 통하여 생활 밀착형 안전관리

□ 개    요

❍ 기 간 : 2017. 1. ~ 12.

❍ 대 상 : 재해위험시설 및 안전위해요소

❍ 내 용 : 군민 안전점검 청구제, 노후건축물 점검,

□ 추진계획

❍ 군민 안전점검 청구제 운영

- 민간 창구(안전신문고, 모니터봉사단, 현장관찰단) 활성화 홍보: 3월

- 생활주변 재해위험시설 신고 및 합동점검 실시 : 연중

❍ 노후건축물 안전점검

- 안전점검 대상시설 조사 (30년 이상 건축물) : 2월

(건축물현황)                                                 (동)

계	30년이하	30년이상	비고
13,335	10,670	2,665	주택, 상가

- 자체 안전점검 실시 : 3월

- 민관합동 안전점검 실시 (정밀점검 필요시) : 4월

❍ 재난관리 역량 강화

- 관내 다중이용업소(PC방 등) 안전 교육 및 캠페인 : 연 2회

- 위기관리매뉴얼 배부 및 자율안전점검 지도 : 연 2회

□ 기대효과

❍ 생활 밀착형 안전점검으로 군민 안전문화 의식 제고로 재산과 인명

피해 최소화

1

2

가흥3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

복구지원담당 ☏ 5202

신규사업

❍ 개발사업 추진에 따른 인공 급경사지가 특성상 붕괴위험이 상존

❍ 자연재해 우려지구를 정비하여 군민의 생명․재산 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 마천면 가흥리 일원

❍ 사 업 량 : 국지도 60호선, 사면 정비 L=75m, H=10m

❍ 사 업 비 : 1,200백만원(국비50%, 도비15%, 군비35%)

❍ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 12월

❍ 사업비 투자계획

(단위:백만원)

사업명	위 치	사업량	사업비				2017년	2018년 이 후
			계	국비	도비	군비
가흥3지구 급경사지 붕괴위험 지역정비 사업	마천면 가흥리	사면정비 L=75m H=10m	1,200	600	180	420	400 (실시설계 및 보상)	800

□ 추진계획

❍ 분할측량 및 감정평가 의뢰 : 2017. 2월

❍ 사업착공 : 2017. 3월

□ 기대효과

❍ 사면붕괴위험을 해소하여 주민과 지리산을 찾는 관광객 및 주변

차량의 안전한 통행과 교통편익 증진

1

1

시가지 옛길 생활기반 조성사업

건설담당 ☏ 5204

역점 및 특수시책

❍ 협소한 마을 안길을 확장하여 마을주민이 쾌적한 주거 환경에서      안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 도로환경 개선

❍ 발전 소외지역에 생활기반을 조성하여 지역 균형발전 실현

□ 개   요

❍ 사 업 명 : 용평4리 마을안길 확∙포장공사

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 시조회관 ~ 이교집

❍ 사 업 량 : 진입로 확.포장 L=191.4m, B=5.0m

❍ 사 업 비 : 700백만원

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:m/백만원)

구 분	사업비	2016까지		2017년		장래		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	700	-	300		100		300
공사비	150	실시설계용역	20	마을안길확장 L=191.4m, B=5.0m	100	마을안길확장 L=191.4m, B=5.0m	30
보상및기타	550	1식	280	1식		1식	270

❍ 향후계획

- 공사착공 : 2017. 1.

- 공사준공:  2017. 12.

□ 기대효과

❍ 주거환경 개선으로 군민의 삶의 향상 도모와 지역균형발전에 이바지함

❍ 화재발생 시 소방통로 확보하여 군민의 소중한 생명과 재산보호

1

2

이은~난평간도로 확․포장공사

도로담당 ☏ 5205

역점 및 특수시책

❍ 지방도 연장으로 도로를 이용하는 군민의 교통편익 제공 및

지역 접근성 제고

❍ 지방도 확·포장으로 원활한 통행성 확보로 편익 증진 도모

□ 개    요

❍ 사 업 명 : 이은~난평간도로 확포장공사

❍ 위    치 : 함양읍 이은리 남산 ~ 난평리 신기

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.5km, 교량가설 L=46m

❍ 사 업 비 : 18,000백만원

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		2016까지		2017년		2018이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장L=2.5km 교량 1개소 L=46m	18,000	실시설계용역 1식	200	도로확포장L=0.1km	1,000	도로확포장L=2.4km 교량 1개소 L=46m	16,800

❍ 추진실적 및 향후계획

- 실시설계 : 2015. 6. ~ 12.

- 행정절차 이행 : 2015. 10.~ 2017. 12.

- 보상협의 : 2017. 1.

- 공사착공 : 2018. 1.

- 공사준공:  2020. 1.

□ 기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

1

3

상림산책로(운죽선) 조성사업

도로담당 ☏ 5205

역점 및 특수시책

상림공원 조성계획과 더불어 공원내 산책로 정비로 관광객 및

주민들이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 환경 개선

□ 개    요

❍ 사 업 명 : 상림산책로(운죽선) 조성사업

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 상림안내소 ~ 대덕리 죽장마을

❍ 사 업 량 : 산책로 조성 L=1.6km

❍ 사 업 비 : 4,700백만원

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비고 (진도)
			계	기시행	2017년	장래
상림산책로(운죽선) 조성사업	함양읍 교산~대덕	1.6	4,700	600	800	3,300

❍ 추진실적 및 향후 계획

- 실시설계 : 2015. 1. ~ 12.

- 행정절차 이행 : 2016. 1 ~ 12.

- 보상협의 : 2017. 1.

- 공사착공 : 2017. 1.

- 공사준공:  2019. 1.

□ 기대효과

❍ 상림공원 조성계획에 의한 산책로 조성으로 상림공원 환경 개선       및 생활편익 증진

1

4

소하천 정비사업

하천담당 ☏ 5203

역점 및 특수시책

❍ 수해피해 우려 및 발생 지구의 하천정비로 피해예방과 하천환경 개선

❍ 친환경적 하천 조성으로 생태계 보전과 지역주민 생활편의 제공

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2017년	2018이후
계		L=4.27	7,226	100	720	6,406	지특50% 군 50%
남산소하천 정비사업	함양읍 이은리	L=2.94	3,540	100	360	3,080
학골소하천정비사업	서상면 중남리	L=1.33	3,686	0	360	3,326	실시설계

□ 추진계획(남산소하천)

❍ 실시설계 : 2016. 11월

❍ 설계심사 의뢰 : 2016. 12월

❍ 보상협의 및 사업착공 : 2017. 2월

□ 기대효과

❍ 재해로부터 사전 피해를 예방하고 친수공간 조성으로 주거 환경

개선에 기여

1

1

선제적 재난예방 대책

안전관리담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 재난예방활동 강화로 위험요인 사전 해소

❍ 재난 초기대응 역량강화로 군민의 생명과 재산보호

□ 추진방향

❍ 실효성 있는 안전관리계획 수립

❍ 취약시설 안전점검 강화

❍ 군민과 함께하는 안전문화운동 전개로 안전의식 고취

□ 추진계획

❍ 재난예방 및 초기 대응역량 강화

- 함양군 안전관리계획 수립 : 2017. 5월

- 재난대응 안전한국훈련 실시 : 2017. 5월

- 재난취약시설 안전점검 : 115개소(특정102, 시특13 / 연2회)

- 안전신문고 등 재난신고제도 적극 홍보 : 캠페인 연 4회 이상

❍ 안전문화운동 추진

- 어린이 안전체험학습장 운영

·춘기(4월~6월), 추기(9월~10월) 2회 운영

·교육목표 : 연간 500여명/유치원, 초등학생

- 매월 4일 안전점검의 날 운영 : 캠페인 및 취약지역 안전점검 실시

❍ 여름철 물놀이 안전관리 추진 : 2017. 6 ~ 8월

- 인명구조시설·장비 점검 : 176개소

- 안전관리요원 배치 : 35명 (유급요원 15, 119시민수상구조대 20)

□ 기대효과

❍ 선제적 재난대응 체계 구축을 통한 군민의 재산·인명피해 최소화

1

2

주민숙원사업 시행

건설담당 ☏ 5204

일반계속사업

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 시행으로 편익제공

❍ 생활주변 불량 시설물 정비로 안전사고 사전 예방

❍ 새마을 농로 편입부지에 대한 민원예방과 행정력 손실 방지

□ 추진방향 또는 개요

❍ 주민숙원 및 소규모 주민숙원사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 244개소

․ 주민숙원사업 : 139개소(주민참여 17, 읍면건의 16, 주민숙원 106)

․ 소규모주민숙원사업 : 105개소

․ 정자유지관리사업 : 14개소

- 사 업 비 : 5,574백만원

- 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 생활주변 안전시설 정비사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 생활주변 안전시설 13개소

- 사 업 비 : 50백만원

- 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사업대상 : 새마을사업 농로 편입부지 이전등기

- 사 업 비 : 60백만원

- 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 추진계획

❍ 주민숙원사업

- 편입토지 희사승락서 사전 징구 : 2016. 12. ~ 2017. 2월

- 기본조사 및 실시설계 : 2017. 1. ~ 2월

- 사업시행 : 2017. 3. ~ 11월

❍ 생활주변 안전시설 정비사업

- 생활주변 불량시설 읍면별 전수조사 : 2017. 1월

- 사업계획 및 시행 : 2017. 2. ~ 6월

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 분할 및 등기대상 필지 조사 : 2017. 2월

- 협의 취득 및 이전등기 : 2017. 2. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 주민숙원사업의 요구는 많으나 예산부족으로 적절한 지원이 이루어지지 않아 애로 발생, 충분한 예산 확보 필요

□ 기대효과

❍ 생활기반시설 확충으로 주민 편익제공을 통한 삶의 질 향상 기여

❍ 생활주변 안전시설 정비로 농촌지역 노령화 인구의 안전성확보

❍ 차량 및 보행자의 안전을 위협하고 있는 불량 시설정비로 각종

민원해소와 안전사고 사전예방

❍ 민원발생으로 인한 행정력 손실 방지 및 군민의 재산권 보호

1

3

군도 확․포장사업

도로담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 군도의 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로 주민 편익 증대

□ 개    요

❍ 노선수 및 사업량 : 24개 노선, L=204.4km

❍ 사업비 : 224,293백만원

□ 그간 추진 실적

(단위:km/백만원)

노선수	전체		기투자		2017년 시행		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
24	204.4	224,293	118.9	82,471	5	800	80.5	141,022

□ 추진계획

❍ 사업내용

(단위:km/백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비고 (진도)
			계	기시행	2017년	장래
계	4개소	5	11,083	5,263	800	5,020
구룡~옥환(군도9호) (원산~지소)	병곡 원산	2.0	2,760	2,360	400		계속 (50%)
도천~구라(군도16호)	병곡 월암	1.0	3,023	2,423	200	400	계속 (70%)
송계~노상(군도21호)	서하 송계	1.0	1,500	340	100	1,060	계속 (보상)
중남~복동(군도23호)	서상 금당	1.0	3,800	140	100	3,560	신규 (용역)

❍ 추진일정

- 2017.  1 ∼ 2017. 4월 : 실시설계 용역 시행

- 2017.  4 ∼ 2017. 6월 : 보상협의 및 사업시행

- 2017. 12월 : 사업완료

□ 문제점 및 대책

❍ 예산부족으로 공사기간 장기간 소요, 부족사업비 조기 확보

□ 기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

1

4

농어촌도로 확․포장사업

도로담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 농어촌도로의 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로 주민 편익 증대

□ 개    요

❍ 노선수 및 사업량 : 284개 노선, L=667.5km

❍ 사업비 : 680,631백만원

□ 그간 추진 실적

(단위:km/백만원)

노선수	전체		기투자		2017년 시행		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
284	667.5	680,631	352.17	241,848	9.2	1,952	306.13	436,831

□ 추진계획

❍ 사업내용                                        (단위:km/백만원)

사업명	위 치	사업량	사 업 비				비고 (진도)
			계	기시행	2017년	향후
계	11개소	9.2	13,213	2,316	1,952	8,945
임산선	휴천 호산	0.6	750	550	200	0	마무리
이장선	안의 이전	1.0	2,000	250	200	1,550	보상 중
신촌선	백전 백운	0.8	1,550	217	150	1,183	보상 중
실도선(도마)	마천 군자	1.6	800	150	200	450	보상 중
유회선	유림 서주	0.6	900	162	200	538	보상 중
도마선	병곡 도천	1.1	2,050	500	300	1,250	보상 중
옥해선	서하 운곡	0.5	700	100	200	400	보상 중
촉동선 (등구사진입로)	마천 구양	0.5	1,523	200	200	1,123	보상 중
백무선	마천 강청	0.5	400	187	150	63	보상 중
동상선	안의 하원	0.6	1,000	0	65	935	설 계
옥동선	유림 옥매	1.4	1,540	0	87	1,453	설 계

❍ 추진일정

- 2017. 1 ∼ 2017. 5월 : 실시설계 및 보상협의

- 2017. 6 ∼ 2017. 11월 : 사업시행 및 추진

- 2017. 12월 : 사업완료

□ 문제점 및 대책

❍ 예산부족으로 공사기간 장기간 소요, 부족사업비 조기 확보

□ 기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

1

5

대방~중기간(지방도 742호) 도로 확․포장공사

도로담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 백전~임실 간 도로 확․포장사업이 일부 구간만 2004년 확장 후,

장기간 중단된 상태로 동절기 폭설 및 결빙 시 교통 불편 초래

❍ 지역주민으로부터 민원이 끊이지 않고 있는 실정에 있음

□ 개    요

❍ 위    치 : 백전면 운산, 백운리

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.9km, B=9.5m

❍ 사업기간 : 2014. 11 ~ 2017. 12.

❍ 사 업 비 : 7,000백만원(특교세 500, 도비 5,500, 군비 1,000)

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2017년		2017이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장 L=1.9km	7,000	도로확포장 L=1.3km	5,750	도로확포장 L=0.3㎞	200	도로확포장 L=0.3㎞	1,050
특교세		500		500		0		0
도 비		5,500		4,250		200		1,050
군 비		1,000		1,000		0		0

❍ 추진실적 및 향후계획

- 경상남도 투․융자 승인: 2013. 10.

- 실시설계 완료 : 2014. 2.

- 행정절차 이행 및 보상협의: 2014. 6.~12

- 공사착공 : 2014. 10.

- 공사준공 : 2018. 12.

□ 기대효과

❍ 동절기 폭설 및 결빙 시 교통 불편해소 및 주민편익증대

1

6

농업기술센터 진입도로 개설공사

도로담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 농업기술센터 및 농업행정타운과 기 조성된 하림공원을 잇는

보도교 설치로 군민의 이용편익 증진 및 경제 활성화 도모

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 일원

❍ 사 업 량 : 보도교 L=120m, 진입도로 L=113m

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(도비 2,000, 군비 2,000)

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2017년		2017이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	교량 L=120m, 진입도로 L=113m	4,000	실시설계, 교량하부공 L=120m	1,300	교량 상부공 L=120m	1,000	진입도로 L=113m	1,700
특교세
도 비		2,000		1,000				1,000
군 비		2,000		300		1,000		700

❍ 추진실적 및 향후계획

- 실시설계 완료 : 2015. 6.

- 행정절차 이행 및 보상협의: 2016. 2.

- 공사착공 : 2016. 3.

- 공사준공:  2018. 12.

□ 기대효과

❍ 기 조성된 하림공원과 농업기술센터 진입도로 개설로 군민 및 내방객 볼거리 및 교통편익 제공

1

7

자연재해 위험지구 정비사업

복구지원담당 ☏ 5202

일반계속사업

❍ 도로 비탈면 붕괴, 낙석 피해 지구를 원천적으로 정비

❍ 지리산과 백무동을 찾아오는 관광객, 주민, 차량의 안전한 통행과 교통편익을 증진하고 인명․재산 보호

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2017년	2018이후
계	2개소		4,300	3,720	580	0
강청지구급경사지붕괴위험지역정비사업	마천면 강청리	o 농어촌도로 203호선 o 사면정비 L=980m	3,900	3,400	500	0
농촌재난경보방송설치공사	유림면 백전면	o 면사무소 경보방송 2개소	400	320	80	0

□ 추진계획

❍ 착  공 : 2017. 2월

❍ 준  공 : 2017. 12월

1

8

자연친화적 하천관리 사업

하천담당 ☏ 5203

일반계속사업

❍ 아름다운 자연형 생태하천 복원과 재해로부터 군민의 재산 보호

❍ 치수, 친수, 생태복원 및 역사와 문화가 흐르는 고향의 강으로 하천조성

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2017년	2018이후
계	3개소	하천정비 L=9.13km 교량 3개소	62,319	35,956	10,252	16,111
함양위천 생태하천 조성사업	함양읍 죽곡리 (솔숲) ~ 이은리 (인당교)	o 하천정비 L=3.4km o 교량 1개소	30,944	22,756	3,000	5,188
구룡천 고향의강 조성사업	함양읍 난평리 (신기교) ~ 이은리 (이은교)	o 하천정비 L=2.3km o 교량 2개소	17,687	9,100	4,422	4,165
소하천 정비사업	관동 소하천외 2개소	o 하천정비 L=3.43km	13,688	4,100	2,830	6,758	관동 미동 오현

□ 추진계획

❍ 착  공 : 2017. 2월

❍ 준  공 : 2017. 12월

□ 기대효과

❍ 재해로부터 사전 피해를 예방하고 친수공간 조성으로 주거 환경

개선에 기여

1

9

일반농산어촌 개발사업

농업기반담당 ☏ 5206

일반계속사업

❍ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

❍ 권역단위 종합정비사업                          (단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2016년 까지	2017년	2017년 이후
합 계	13권역		19,656	7,185	7,036	5,435
삼동권역	병곡면 옥계리	2014 ~ 2017년	3,660	2,211	1,449		군 직영
죽림권역	함양읍 죽림리	2014 ~ 2017년	3,463	1,504	1,959		농어촌공사 위탁시행
덕암권역	지곡면 덕암리	2015 ~ 2018년	3,966	1,950	1,346	670	농어촌공사 위탁시행
운서권역	휴천면 운서리	2015 ~ 2018년	928	625	303		군 직영
남덕유산	서상면 상남리	2016 ~ 2019년	3,715	446	454	2,815	군 직영
웅곡마을	함양읍 웅곡리	2016 ~ 21017년	447	157	290		군 직영
회동마을	유림면 서주리	216 ~ 2017년	497	148	349		군 직영
안심마을	안의면 이전리	216 ~ 2017년	480	144	336		농어촌공사 위탁시행
거기마을	서하면 송계리	2017~ 2018년	500		110	390	농어촌공사 위탁시행
도북마을	수동면 도북리	2017~ 2018년	500		110	390	농어촌공사 위탁시행
연서마을	병곡면연덕리	2017~ 2018년	500		110	390	농어촌공사 위탁시행
남효마을	지곡면남효리	2017~ 2018년	500		110	390	농어촌공사 위탁시행
월평마을	휴천면월평리	2017~ 2018년	500		110	390	농어촌공사 위탁시행

❍ 읍면 소재지 종합정비사업                       (단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2016년 까지	2017년	2018년 이후
합 계	3건		16,711	4,889	8,126	3,696
휴천면	함양읍 목현리	2014년~ 2017년	6,447	3,284	3,435		군 직영
백전면	백전면 평정리	2015년~ 2018년	5,485	1,109	2,280	2,097	군 직영
서하면	서하면 송계리	2016년~ 2019년	4,506	496	2,411	1,599	농어촌공사 위탁시행

❍ 취약지역 생활여건 개조사업

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2016년 까지	2017년	2018년 이후
합 계	1건		2,177	1,088	1,089
옥계	병곡면 옥계리	2015년~ 2017년	2,177	1,088	1,089		군 직영

※ 재원 비율(지특 70%, 도비 9%, 군비 21%)

□ 추진계획

❍ 백전면소재지 종합정비 하드웨어사업 착공 :         2017.  1월

❍ 남덕유산권역 종합정비사업 시행계획 수립 및 착공 : 2017.  1월

❍ 서하면소재지 종합정비사업 시행계획 수립 및 착공 : 2017.  1월

❍ 웅곡,회동,안심권역 종합정비 하드웨어사업 착공 :    2017.  2월

❍ 운서권역 종합정비사업 준공 :                      2017. 11월

❍ 옥계취약지역 생활여건개조사업 준공 :              2017. 11월

❍ 삼동권역 종합정비사업 준공 :                      2017. 12월

❍ 죽림권역 종합정비사업 준공 :                      2017. 12월

❍ 휴천면소재지 종합정비사업 준공 :                  2017. 12월

❍ 웅곡,회동,안심권역 종합정비사업 준공 :             2017. 12월

□ 기대효과

❍ 농촌마을의 생활환경정비와 주민 소득기반 확충 및 면소재지

거점기능 강화

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전 기여

1

10

재해위험 저수지 정비사업

농업기반담당 ☏ 5206

일반계속사업

❍ 저수지 붕괴 등으로 인한 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

□ 개    요

❍ 사업구분 : 국비보조사업(계속)

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 두산저수지, 유림면 유평리 유평저수지

휴천면 호산리 도장골저수지, 안의면 대대리 대대웃못저수지

❍ 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4년간)

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 정비사업 1식

❍ 사 업 비 : 7,863백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2016년까지	2017년	2018년이후
합 계	7,863	2,370	2,330	3,163
두산	2,270	1,670	600
유평	1,793	500	600	693
도장골	2,000	100	600	1,300
대대웃못	1,800	100	530	1,170

□ 추진계획

❍ 도장골, 대대웃못저수지 착공               : 2017.  2월

❍ 두산저수지사업 준공                       : 2017. 12월

❍ 유평,도장골,대대웃못 저수지사업 준공       : 2018. 12월

□ 기대효과

❍ 재해위험을 사전에 정비 및 보강하여 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안전적 용수공급으로 영농환경개선 및 주민 소득기반 확충