상하수도사업소

Ⅰ. 2017 업무추진 방향	387

Ⅱ. 2017 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 함양군 지방상수도 현대화사업	391

□ 유림지구 광역 마을상수도 설치사업	392

□ 병곡·지곡 농어촌 지방상수도 확충사업	393

□ 함양군 마을하수도 확충사업	394

2. 역점(특수)시책

□ 수도계량기 옥외검침기 확장설치사업	395

3. 일반계속사업

□ 마을상수도 운영 및 정비사업	396

□ 안정적인 지방상수도 공급시설 확충사업	397

□ 함양군 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)	398

Ⅰ		2017 업무추진 방향

군민 3만불시대를 여는 군민 물복지 실현

	전략목표
지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성 맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대
	단위사업
지방상수도 급수구역 확대유지로 안정적인 맑은물 공급 지방상수도 현대화사업 추진 하수처리시설 확대 추진 마을상수도 통합관리 시스템 구축으로 생활용수의 안정적 공급 ⑤ 하수관거 정비 BTL사업 마무리

	Ⅱ. 2017 주요업무 추진사항

1

1

함양군 지방상수도 현대화 사업

상수도담당 ☏ 5232

신규사업

❍ 수도관의 부식정도가 심하여 누수 및 녹물발생이 빈번하고 낮은

유수율로 수도경영 수지악화 및 수돗물 신뢰도 저하

❍ 유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적

공급으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 함양읍, 안의면 2개 급수구역

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.(5년간)

❍ 사업내용 : 함양군 함양읍, 안의면 2개 급수구역 24.6km 정비

급수블록 구축 11개, 관망 유지관리시스템 구축 1식

❍ 총사업비 : 17,617백만원(국비 50%, 지방비 50% 원칙, 0~20% 차등 추가 지원)

□ 추진실적

❍ 노후상수도 현대화사업 예산확정 및 통보(환경부) : 2016. 9.

❍ 사업제안 검토 및 협의, 실시협약 체결 : 2016. 10.

□ 추진계획

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

구 분	총사업비		기투자	2017년	2018년이후	비고
함양군 지방상수도 현대화사업	총계	17,617	1,047	2,643	13,927	2017 ~ 2021
	국비(50%)	8,809	-	1,586	7,223
	군비(50%)	8,808	1,047	1,057	6,704

□ 기대효과

❍ 유수율 85% 목표 달성 및 지방상수도 선순환구조 달성으로 수도경영 자립화 기여

❍ 유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적

공급으로 삶의 질 향상

1

2

유림지구 광역 마을상수도 설치사업

관리담당 ☏ 5231

신규사업

❍ 유림·휴천지구 노후된 소규모 수도시설을 통합, 광역 마을상수도 설치

❍ 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적 공급으로 군민 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 유림면 휴천면일원(13개마을, 1,371여명)

(우동, 화촌, 장항, 회동, 유평, 옥산, 화암, 판문, 지곡, 손곡, 창촌, 서주, 동호)

❍ 사 업 량  : 취·정수장 470톤/일, 관로 31.4km

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3년)

❍ 총사업비  : 6,063백만원(지특 4,244, 군비 1,819)

2017년 857백만원(지특 600, 군비 258)

※ 총소요사업비 10,439백만원으로 향후 총사업비 협의시 확보계획

□ 추진계획

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

사업명	총사업비		기투자	2017년도	2018이후	비고
유림지구 광역 마을상수도 설치사업	총계	6,063	224	857	4,982
	국비(70%)	4,244	-	600	3,644
	군비(30%)	1,819	224	257	1,338

❍ 우동·화촌지구 하수관로 정비사업과 병행 상수도 급수관로 정비 : 2017년 3월

❍ 공사착공 : 2017. 3.

❍ 토지보상 : 2017. 1. ~ 3.

□ 기대효과

❍ 수질과 수원이 양호한 광역 마을상수도 설치와 통합관리시스템구축으로

맑고 깨끗한 생활용수를 안정적 공급함으로서 군민 삶의 질 향상

1

3

병곡·지곡 농어촌 지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5232

신규사업

❍ 병곡·백전·지곡·수동 지구에 원활한 지방상수도 공급·확대를

통한 주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

❍ 옥계저수지 용수를 활용한 안정적인 원수확보로 향후 원수부족

등 각종 사고 시 신속대응체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 병곡·백전면, 지곡·수동면 일원(29개마을, 2,656여명)

❍ 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2020. 12월

❍ 사업계획                                        (단위 : 백만원)

사업명	사 업 비			사 업 량		비고
	계	지특	지방	시설	관로 시설
병곡 농어촌 지방상수도 확충사업	10,328	7,112	3,216	배수지 1개소 가압장 3개소	21.5km	도천․가촌․휴촌․송평․덕평․토내․ 신기․하대평․백현․상대평․양천․음천
						시목․중방․봉곡․수여․마산․덕암 오평․창촌․계곡․주암․거평․백일 상백․금호․내백․구라
지곡 농어촌 지방상수도 개발사업	10,591	7,413	3,178	가압장 4개소	54.3km

□ 추진계획

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

사업명	총사업비		기투자	2017년	2018년이후	비고
농어촌 지방상수도 확충사업	총계	20,919	462	1,573	18,884	2017 ~ 2020
	국비(70%)	14,525	205	1,100	13,220
	군비(30%)	6,394	257	473	5,664

❍ 도로굴착심의 및 수도사업 인가 : 2017. 1.

❍ 계약심사 : 2017. 2.

❍ 공사착공 및 준공 : 2017. 2. ~ 2019. 12.

□ 기대효과

❍ 병곡·지곡면 일원의 마을 상수도 급수지역의 지방상수도 급수로

❍ 맑고 깨끗한 물 공급

❍ 가뭄대비 옥계저수지 용수사용으로 원수공급의 안정성 확보

1

4

함양군 마을하수도 확충사업

하수도담당 ☏ 5233

신규사업

❍ 마을단위 하수도시설을 정비하여 남강댐 상류지역 물 자원의

효율적 운용관리로 공공수역 수질 및 정주여건 개선

❍ 생활필수기반 하수도시설을 설치·정비하여 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 마천·유림·백전·병곡면 일원

(4개 면, 12개 마을, 1,349명)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.

❍ 사업현황                                     (단위 : 백만원)

사업명	사 업 량	사 업 비			비고
		계	국비	지방비
계		13,106	9,130	3,976
우동지구 농어촌마을	처리장 80㎥/일, 하수관로 3.5㎞	3,179	2,225	954
추성지구 농어촌마을	처리장 260㎥/일, 하수관로 4.9㎞	4,823	3,376	1,447
오천지구 농어촌마을	처리장 60㎥/일, 하수관로 5.7㎞	3,067	2,147	920
백무동지구 하수관로	하수관로 2.9㎞	2,037	1,382	655

□ 추진계획

❍ 사 업 비                                      (단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	2017년도	2018이후	비고
총계	13,106	4,254	4,072	4,780
우동지구 농어촌마을	3,179	397	1,546	1,236
추성지구 농어촌마을	4,823	1,857	1,728	1,238
오천지구 농어촌마을	3,067	1,143	406	1,518
백무동지구 하수관로	2,037	857	392	788

❍ 마을하수도 확충사업 2차 주민설명회 : 2017. 2.

□ 기대효과

❍ 지리산 공원구역, 함양 상수원 수원지역의 악취제거, 수인성 전염병 예방 등으로 공공수역의 수질 향상으로 쾌적한 농촌생활 환경 조성

1

1

수도계량기 옥외검침기 확장설치사업

상수도담당당 ☏ 5232

역점 및 특수시책

❍ 수도계량기가 건물 내 설치, 물건 적재 등으로 검침이 어려운 수용가에 영상촬영방식의 옥외검침기를 설치하여

2020 함양 산삼 항노화 엑스포

❍ 정확하고 원활한 검침업무 수행과 수도 요금의 신뢰 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 지방상수도 급수구역 전체

❍ 사 업 량 : 옥외검침기 300개소

❍ 사 업 비 : 100백만원(상수도사업 특별회계)

❍ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 6월

□ 추진실적

❍ 남원시 벤치마킹 : 2015. 10. 15.

❍ 2016년 시범사업 : 2016. 1. ~ 4.

- 300개소 : 행복마을 78개소, 함양읍 222개소

❍ 2017년 설치대상지 조사 : 2016. 9. ~ 12.

□ 추진계획

❍ 사업시행 및 완료 : 2017. 1. ~ 6.

□ 기대효과

❍ 방문검침에 따른 사생활 침해 등 군민불편 해소를 통한 고객서비스 개선

❍ 옥외검침기에 의한 영상촬영검침으로 정확성 및 신뢰성 제고

❍ 검침시간 단축 및 1회 방문 검침으로 인한 검침효율성 향상

□ 옥외검침 시스템 설치 사진

계량기 상단 영상촬영장치 설치	촬영 단자설치

1

1

마을상수도 운영 및 정비사업

관리담당 ☏ 5231

일반계속사업

❍ 인구 노령화에 따른 수질 및 시설 운영 전문업체 위탁 운영

❍ 누수, 원수부족, 수질불량 시설에 개량 정비로 생활용수를 안정

적으로 공급하여 군민 삶의 질 향상

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	사 업 량	사업비	비고
계		1,703
마을상수도 운영 및 유지관리	- 긴급보수 1식 - 시설물 유지관리 (지하수사후관리 33개소 수위조절기 11개, 염소투입기 11개) - 농촌형 소방용수 개·보수 40건	629
마을상수도 노후관로 교체	- 노후관로 교체 1개소 L=2.5km (백전면 평촌마을)	217
소규모 수도시설 개량	- 소규모수도시설개량 3개소 L=7.2km [안내곡, 송전(세동), 거기(양지)]	857

□ 추진계획

❍ 마을상수도 유지관리 : 2017. 1. ~ 12.

❍ 마을상수도 노후관로 교체 시행 : 2017. 2. ~ 11.

❍ 소규모 수도시설 개량 : 2017. 2 ~ 11.

❍ 사업 내용

- 마을상수 유지관리(11개 읍·면 265개소) 629백만원

- 마을상수도 노후관로 교체 1개소(백전면 평촌마을) 217백만원

- 소규모수도시설개량 3개소(함양 안내곡, 휴천 송전(세동), 서하 거기(양지) 857백만원

□ 기대효과

❍ 맑고 깨끗한 생활용수 공급으로 군민 삶의 질 향상

1

2

안정적인 지방상수도 공급시설 확충사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 안정적인 지방상수도 원수 확보 및 확충으로 서상․서하․안의지구에

원활한 지방상수도 공급 및 시설 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 서상·서하·안의면 일원(3개면, 17개 마을, 7,800명)

❍ 사업기간 : 2014. 12. ~ 2017. 12.(4년간)

❍ 사업계획                                        (단위 : 백만원)

사업명	사 업 량			사 업 비(억원)			비고
				계	지특	지방
서상 농어촌 지방상수도 확충사업	배수지 1개소 V = 1,800㎥	가압장 5개소	관로시설 40.0㎞	10,111	7,078	3,033	2017년 준공

□ 추진계획

❍ 서상농어촌 지방상수도 확충사업 : 서상면, 서하면, 안의면 지방상수도 미급수지역에 상수도 급수를 위한 배·급수관로 설치사업

- 사 업 량 : 가압장 4개소, 배·급수관로 30.0km

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 12.

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

사업명	총사업비		기투자	2017년	2018년이후	비고
서상농어촌 지방상수도 확충사업	총계	10,111	4,447	5,664	-	2014 ~ 2017
	국비(70%)	7,078	3,113	3,965	-
	군비(30%)	3,033	1,334	1,699	-

□ 기대효과

❍ 대남 식수전용 저수지를 수원으로 활용하여 서상, 서하, 안의지역으로 지방상수도 급수구역을 확대하여 주민생활 편의 제공 및 주민의 삶의 질 향상

1

3

함양군 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)

하수도담당 ☏ 5233

일반계속사업

❍ 우·오수를 분리하여 하수처리 함으로써 수처리 효율성 향상

❍ 함양읍 시가지 우수관로 정비로 강우 시 도심의 원활한 배수 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 일원(운림, 교산, 용평, 백연, 이은리)

❍ 공사기간 : 2015. 7. ~ 2017. 9.

❍ 운영기간 : 2017. 9. ~ 2037. 9.

❍ 사 업 량 : 오수관로 L=23.6km, 우수관로 L=6.9km, 배수설비 2,719개소

❍ 총사업비 : 35,145백만원

□ 추진실적

❍ 사업 선정(환경부) : 2012. 4.

❍ 대상사업지정 및 기본계획수립 고시 : 2013. 12.

❍ 사업시행자 선정 및 실시협약 체결 : 2014. 11.

❍ 실시계획 실시 : 2014. 11. ~ 2015. 4.

❍ 실시계획 승인 및 고시 : 2015. 7.

❍ 사업 착공 : 2015. 7.

※ 예산절감을 위하여 상수도 노후관로 교체사업 병행 시행(L=7km, 603백만원)

□ 추진계획

❍ 시운전 및 사업 준공 : 2017. 3. ~ 2017. 9.

❍ 위탁운영 및 운영성과 평가(20년) : 2017. 9. ~ 2037. 9.

□ 기대효과

❍ 기존 합류식 하수관로를 분류식으로 정비하고 모니터링시스템 구축,

노후관 정비로 시가지 악취 제거, 강우시 배수 원활로 침수 방지 등 수질개선과 쾌적한 생활환경 조성

❍ 건물 신축 시 정화조 미설치로 주민부담 경감