상하수도사업소

Ⅰ. 2018 업무추진 방향	413

Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 함양군 마을하수도 확충사업	417

2. 역점(특수)시책

□ 함양군 지방상수도 현대화사업	418

3. 일반계속사업

□ 광역마을상수도(유림지구)설치사업	420

□ 마을상수도 운영 및 정비사업	421

□ 수도계량기 옥외검침기 확장설치사업	422

□ 병곡지구 농어촌지방상수도 확충사업	423

□ 지곡지구 농어촌지방상수도 확충사업	424

□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영	425

Ⅰ		2018 업무추진 방향

항노화의 중심 함양 물 복지 실현

	전략목표
맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성
	단위사업
마을상수도 통합관리 시스템 구축으로 생활용수의 안정적 공급 지방상수도 급수구역 확대유지로 안정적인 맑은물 공급 지방상수도 현대화사업 추진 하수처리시설 확대 추진 ⑤ 하수관로 정비 BTL사업 완료로 운영 지원 관리

	Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1

1

함양군 마을하수도 확충사업

하수도담당 ☏ 5233

신규사업

❍ 마을단위 하수도시설을 정비하여 남강댐 상류지역 물 자원의

효율적 운용관리로 공공수역 수질 및 정주여건 개선

❍ 생활필수기반 하수도시설을 설치·정비하여 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 마천·유림·안의·백전·병곡면 일원

(5개 면, 17개 마을/1,592명)

❍ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2020. 12월

❍ 사업현황                                     (단위 : 백만원)

사업명	사 업 량	사 업 비			비고
		계	국비	지방비
계		16,106	11,230	4,876
농월정지구 농어촌하수	처리장 380㎥/일, 하수관로 3.8㎞	3,000	2,100	900
우동지구 농어촌마을	처리장 80㎥/일, 하수관로 3.5㎞	3,179	2,225	954
추성지구 농어촌마을	처리장 260㎥/일, 하수관로 4.9㎞	4,823	3,376	1,447
오천지구 농어촌마을	처리장 60㎥/일, 하수관로 5.7㎞	3,067	2,147	920
백무동지구 하수관로	하수관로 2.9㎞, 배수설비 110개소	2,037	1,382	655

□ 추진계획                               (단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	2018년	2019년이후	비고
총계	16,106	8,881	3,590	3,635
농월정지구 농어촌하수	3,000	70	429	2,501
우동지구 농어촌마을	3,179	2,228	507	444
추성지구 농어촌마을	4,823	3,674	1,103	46
오천지구 농어촌마을	3,067	1,735	1,049	283
백무동지구 하수관로	2,037	1,174	502	361

❍ 공사 착공 : 2016. 1월

❍ 마을하수도 확충사업 2차 주민설명회 : 2018. 1월

❍ 사업완료 및 준공 : 2020. 12월

□ 기대효과

❍ 농월정관광단지, 함양 상수원 수원지역의 악취제거, 수인성 전염병 예방 등으로 공공수역의 수질 향상으로 쾌적한 농촌생활 환경 조성

1

1

함양군 지방상수도 현대화사업

상수도담당 ☏ 5232

역점 및 특수시책

❍ 수도관의 부식정도가 심하여 누수 및 녹물발생이 빈번하고 낮은

유수율로 수도경영 수지악화 및 수돗물 신뢰도 저하

❍ 유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적

공급으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 함양읍, 안의면 일원

❍ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2021. 12월(5년간)

❍ 사업내용 : 함양군 함양읍, 안의면 3개 급수구역 27.2km 정비

블록(시) 구축 11개, 관망 유지관리시스템 구축 1식

❍ 총사업비 : 17,617백만원(국비 50%, 지방비 50% 원칙, 0~20% 차등 추가 지원)

□ 추진계획

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

구 분	총사업비		기투자	2018년	2019년이후	비고
함양군 지방상수도 현대화사업	총계	17,617	2,743	2,643	12,231	2017 ~ 2021
	국비(50%)	9,077	1,586	1,321	6,169
	군비(50%)	8,540	1,157	1,322	6,062

❍ 사 업 량

구 분	사 업 내 용	비 고
관망정비공사 실시설계용역	사업대상구역(함양,안의) 2021년까지 관망정비공사 계획 수립 ·노후관, 문제관로(출수불량, 누수다발관 등) 27.2km 교체
블록시스템 구축	함양군 지방상수도 全급수구역 블록시스템 구축공사 ·소블록 12개소 : 함양 8개소, 안의 2개소, 서상 2개소
누수탐사 및 복구	지하누수를 찾기 위한 누수탐사용역 추진(누수적출 100개소) 누수탐사 및 도로누수 민원에 의한 누수복구공사 시행 ·총 200건 복구 : 함양읍 150건, 안의면 50건
관망정비공사	사업대상구역 노후수도미터 교체공사 ·계량에 관한 법률에 의거 ‘18년 약 800개 교체 추진 사업대상구역 긴급 관망정비공사 ·문제관로 등으로 인한 일부구역 긴급관망정비 추진
유지관리시스템 구축	정수장 및 사업장, 소블록 감시를 위한 유지관리시스템 구축공사

❍ 2018년분 공사 추진일정

- 2018년분 공사 착공 : 2018. 1월

- 관망정비공사 실시설계 : 2018. 2월 ~ 12월

- 블록시스템 구축공사(11블록) : 2018. 2월 ~ 12월

- 누수탐사 및 복구, 관망정비공사 : 연중

- 유지관리시스템 구축 완료 : 2018. 12월

- 2018년분 준공 : 2018. 12월

□ 기대효과

❍ 유수율 85% 목표 달성 및 지방상수도 선순환구조 달성으로 수도경영 자립화 기여

❍ 유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적

공급으로 삶의 질 향상

1

1

광역마을상수도(유림지구)설치사업

관리담당 ☏ 5231

일반계속사업

❍ 유림지구의 노후된 소규모 수도시설을 통합, 광역마을상수도설치

❍ 맑고 깨끗한 생활용수의 안정적 공급으로 군민 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 유림면, 휴천면(13개마을)

❍ 사업기간 : 2017년 ∼ 2019년(3년간)

❍ 사 업 량 : 정수시설 470㎥/일, 취수시설 500㎥/일, 송수관로L=0.60Km

배수관로 L=6.17km, 급수관로 L=6.09km

❍  총사업비 : 6,063백만원(지특 4,244, 군비 1,819)

2018년 2,143백만원(지특 1,500, 군비 643백만원)

□ 추진계획

❍ 사업비 투자계획                                  (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2017 이전 (기투자)		2018 계획		2019 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	취.정수시설 1식 관로L=12.86km	6,063	배수관로 L=3.33km 급수관로 L=1.34km	857	취정수시설 1 송배수관로 L=1.0km 급수관로 L=1.2km	2,143	취정수시설 1식 배수관로 L=2.44km 급수관로 L=3.55km	3,063
국 비		4,244		600		1,500		2,144
도 비		-		-		-		-
군 비		1,819		257		643		919

❍ 2018년분 공사 착공 : 2018. 1월

❍ 2017년분 우동, 화촌지구 준공 : 2018. 5월

❍ 2018년분 준공 : 2018. 12월

□ 기대효과

❍ 수질과 수원이 양호한 광역마을상수도 설치와 통합관리 시스템

구축으로 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로서 군민

삶의 질 향상

1

2

마을상수도 운영 및 정비사업

관리담당 ☏ 5231

일반계속사업

❍ 인구 노령화에 따른 수질 및 시설운영 전문업체 위탁운영

❍ 누수, 원수부족, 수질불량 시설에 개량 정비로 생활용수를 안정적으로

공급하여 군민 삶의 질 향상

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사업비	비고
계		2,633
마을상수도 운영 및 유지관리	긴급유지보수 1식 지하수 사후관리(영향조사) 35개 시설물 유지관리 (수위조절기 17개, 염소투입기 17개,오염방지시설 17개) 한파 및 하수도 병행사업 농촌형 소방용수 개․보수 46건	500 175 220 430 51
마을상수도 노후관로 교체	노후관로 교체 1개소 L=2.15km (마천면 음정마을)	400
소규모 수도시설 개량	소규모 수도시설개량 4개소 L=9.5km (본통, 사안, 상백현, 신촌)	857

□ 추진계획

❍ 마을상수도 유지관리 시행 및 완료 : 2018. 1월 ~ 12월

❍ 마을상수도 노후관로 교체 시행 및 완료 : 2018. 1월 ~ 11월

❍ 소규모 수도시설 개량 시행 및 완료 : 2018. 1월 ~ 11월

❍ 지하수 사후관리 시행 및 완료 : 2018. 3월 ~ 6월

□ 기대효과

❍ 수도시설개량 및 유지관리로 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로      공급함으로 군민 삶의 질 향상

1

3

수도계량기 옥외검침기 확장 설치사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 수도계량기의 건물 내 설치, 물건 적재 등으로 사용량 검침이

어려운 수용가에 대해 영상촬영방식의 옥외검침기를 설치하여

❍ 원활하고 정확한 검침 수행으로 수도 요금 신뢰성 제고

□ 개    요

❍ 위    치 : 지방상수도 급수구역 전체

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년

❍ 사업개요                                   (단위 : 개소, 백만원)

구 분	합계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비고
사업량	1,500	100	222	440	300	300	138
사업비	364	20	39	83	90	90	42

□ 추진계획

❍ 2018년 설치대상지 조사 : 2017년 9월 ~ 12월

❍ 옥외검침기 구입 및 설치 : 2018년 1월 ~ 6월

□ 기대효과

❍ 방문검침에 따른 사생활 침해 등 군민불편 해소

❍ 영상촬영 검침으로 정확성 제고 및 신뢰성 확보

❍ 1회 방문 검침으로 효율성 향상(검침시간 단축)

□ 참고자료(옥외검침시스템 설치사진)

계량기 상단 영상촬영장치 설치	촬영 단자설치

1

4

병곡지구 농어촌지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 마을상수도 공급지역인 병곡지구에 지방상수도 공급 ․ 확대를 통한

주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

❍ 옥계저수지 용수를 활용한 안정적인 원수확보로 향후 원수부족

등 각종 사고 시 신속대응체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 일원

❍ 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2019. 12월

❍ 사업규모 : 관로 15.4㎞, 배수지 1개소, 가압장 1개소

❍ 급수지역 : 송평(향후 확장계획 : 가촌, 휴촌, 덕평, 토내, 신기, 하대평, 백현, 상대평)

❍ 사 업 비

(단위 : 백만원)

총사업비		기투자	2018년	2019년	비고
총계	6,485	858	2,142	3,485	2017 ~ 2019
국비(70%)	4,539	600	1,500	2,439
군비(30%)	1,946	258	642	1,046

□ 추진실적

❍ 수도사업 인가 : 2017. 6월

❍ 총괄발주 : 2017. 6월

□ 추진계획

❍ 2018년분 사업 착공 및 준공 : 2018. 1월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 병곡면 일원의 마을 상수도 급수지역의 지방상수도 급수로 맑고 깨끗한 물 공급

❍ 가뭄대비 옥계저수지 용수사용으로 원수공급의 안정성 확보

1

5

지곡지구 농어촌지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 지곡면 일원의 열악한 마을상수도를 지방상수도로 전환하여 주민

생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

❍ 함양·안의지방상수도 순환배수관로 설치를 통한 향후 원수부족 등

각종 사고 시 신속대응체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 지곡면 일원

❍ 사업기간 : 2016. 2월 ~ 2019. 12월

❍ 사업규모 : 관로 29.1㎞, 가압장 1개소

❍ 급수지역 : 오평, 덕암, 마산, 수여, 봉곡, 중방, 시목, 창촌, 백일

(향후 확장계획 : 거평, 주암, 계곡, 금오, 상백, 내백, 동구, 구라)

❍ 사 업 비

(단위 : 백만원)

총사업비		기투자	2018년	2019년	비고
총계	6,940	1,008	2,142	3,790	2016 ~ 2019
국비(70%)	4,858	705	1,500	2,653
군비(30%)	2,082	303	642	1,137

□ 추진실적

❍ 수도사업 인가 : 2017. 9월

❍ 총괄발주 : 2017. 9월

□ 추진계획

❍ 2018년분 사업 착공 및 준공 : 2018. 1월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 수질과 수원이 양호한 지방상수도 공급으로 주민의 삶의 질 향상

❍ 함양, 안의 순환관로 설치로 원수부족 및 각종사고 대응체계 구축

1

6

하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영

하수도담당 ☏ 5233

일반계속사업

함양군 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)이 2017년에  종료됨에   따라 운영 관리 체계로 전환

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 일원(운림, 교산, 용평, 백연, 이은리)

❍ 공사기간 : 2015. 7월 ~ 2017. 9월

❍ 운영기간 : 2017. 9월 ~ 2037. 9월(20년간)

❍ 사 업 량 : BTL사업(관로정비 30.5km, 배수설비 2,719개소) 임대료 1식

❍ 사 업 비 : 72,112백만원(국비 57%, 지방비 43%)

- 임대료 : 59,000백만원(국70%, 군12%, 기금18%)

- 운영비 : 13,112백만원(군100%)

□ 추진실적

❍ 사업 선정(환경부) : 2012. 4월

❍ 사업시행자 선정 및 실시협약 체결 : 2014. 11월

❍ 실시계획 승인 및 고시 : 2015. 7월

❍ 사업 완료 : 2017. 9월

※ 예산절감을 위하여 상수도 노후관로 교체사업 병행 시행(L=7km, 603백만원)

□ 추진계획

❍ 위탁운영 및 운영성과 평가(20년) : 2017. 9월 ~ 2037. 9월

□ 기대효과

❍ 기존 합류식 하수관로를 분류식으로 정비하고 모니터링시스템 구축,

노후관 정비로 시가지 악취 제거, 강우시 배수 원활로 침수 방지 등 수질개선과 쾌적한 생활환경 조성

❍ 사업구간 하자조치 및 사업구간 외 함양읍 지역 일괄 관리로 민원 신속 처리 도모