상 하 수 도 사 업 소

Ⅰ. 기본현황	487

Ⅱ. 2020 업무추진 방향	493

Ⅲ. 2020 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 삼정지구 하수도시설 설치사업	495

□ 정수시설 기술진단 개선사업	496

2. 일반계속사업

□ 광역마을상수도(유림지구) 설치사업	497

□ 마을상수도 운영 및 정비사업	498

□ 함양군 지방상수도 현대화사업	499

□ 병곡지구 농어촌지방상수도 확충사업	500

□ 지곡지구 농어촌지방상수도 확충사업	501

□ 지방상수도 급수구역 확장사업	502

□ 함양군 마을 하수도 확충사업	503

□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영	504

□ 공공하수시설 운영 및 정비사업	505

함양군 정수장 운영 관리	506

Ⅰ		기본현황

정․현원

구 분	계	상하수도 사업소장	관리 담당	상수도 담 당	하수도 담 당	정수장 담 당	비고
정 원	17	1	5	4	4	3	▫취ㆍ정수장 - 계 : 14명 - 청경 : 3명 - 공무 : 11명
현 원	17	1	5	4	4	3

기   능

구 분	분 장 사 무
관리담당	❍ 일반회계, 상하수도 특별회계 예산편성 및 집행 ❍ 일반서무, 공유재산 관리 ❍ 마을상수도 및 소규모수도시설 정비사업 정비 ❍ 광역마을상수도 사업 시행 ❍ 마을상수도 및 소규모수도시설 조례 관리 ❍ 지하수 개발 및 관리
상수도담당	❍ 상수도 기본 및 정비계획 수립 시행 ❍ 상수도 현대화 구축사업 ❍ 상수도 급수구역 확대, 급수공사 ❍ 상하수도 사용료 부과 징수 ❍ 상하수도 검침, 체납관리 ❍ 노후관 개량, 계량기 교체, 누수방지 사업 ❍ 상수도 관련 조례 관리 ❍ 상수도 민원 처리
하수도담당	❍ 하수도정비기본계획 수립 및 시행 ❍ 하수도시설 확충사업 및 유지관리 ❍ BTL사업 운영 관리 ❍ 하수처리장 설치, 운영 관리 ❍ 하수도 관련 조례 관리 ❍ 배수시설 설치신고 및 관리
정수장담당	❍ 먹는 물 수질관리 ❍ 취ㆍ정수장 설치 운영관리 ❍ 수돗물수질평가위원회 운영관리 ❍ 저수조 및 상수원보호구역 관리 ❍ 약수터, 먹는물 공동시설 관리

지방상수도 현황

정수장	시설 년도	시설용량 (톤/일)	계획급수 인 구	현재급수 인 구	급수 전수	급수구역	근무 인력
계		14,700	29,445	26,454	8,507
함양	1980 (2010)	9,000	21,945	20,284	5,655	함양읍(12개리, 40개 마을) 운림리, 용평리, 대덕리, 교산리, 신천리, 신관리, 백천리, 백연리, 이은리, 난평리, 삼산리, 죽곡리 수동면(3개리, 8개 마을) 화산리, 우명리, 원평리 지곡면(4개리, 7개 마을) 개평리, 평촌리, 공배리, 보산리	공무원 3 청경 3 공무 4
안의	1985 (2005)	2,000	-	-	-	-	공무 1
서상	2015	3,700	7,500	6,170	2,852	서상·서하·안의면 일원 (3개 면, 50개 마을)	공무 5

※ 보급률(66%), 유수율(60%), 생산원가(2,040원), 판매단가(732원), 현실화율(36%)

상수원보호구역 현황

보호구역명	지정일자 (변경일자)	지정면적 (㎢)	위치	수원	취수능력 (㎡/일)	비고
계	2개소	0.41㎢	-	-	11,000
함양상수도	1982. 1. 21.	0.28㎢	취수장 ~ 덕평교 하부 하천구역	위천	9,000
안의상수도	1986. 5. 9. (2005. 3. 3.)	0.13㎢	취수장~마음마을 하부 하천구역	지우천	2,000

약수터 현황

시 설 명	위 치	비 고
상림 약수터	함양읍 운림리 49
백운산 약수터	백전면 백운리 산 91-14

지하수 현황

(단위 : 공)

읍면 구분	관리공수	허가	신고	경미시설	비 고
합 계	9,078	65	9,013	-
함 양	1,703	9	1,694	-
마 천	293	4	289	-
휴 천	459	9	450	-
유 림	445	5	440	-
수 동	1,612	3	1,609	-
지 곡	2,111	3	2,108	-
안 의	1,093	4	1,089	-
서 하	417	8	409	-
서 상	395	10	385	-
백 전	335	9	326	-
병 곡	215	1	214	-

마을상수도 및 소규모 급수시설 현황

구분 읍면	시설수 (개소)	마을상수도			소규모급수시설			비고
		소계	지하수	계곡수	소계	지하수	계곡수
계	238	112	110	2	126	118	8
함양	16	8	8	-	8	7	1
마천	35	19	17	2	16	12	4
휴천	31	7	7	-	24	24	-
유림	24	18	18	-	6	6	-
수동	19	9	9	-	10	10	-
지곡	22	9	9	-	13	13	-
안의	26	10	10	-	16	14	2
서하	12	5	5	-	7	7	-
서상	11	7	7	-	4	4	-
백전	24	11	11	-	13	13	-
병곡	18	9	9	-	9	8	1

※ 마을상수도 : 급수인구 2,500명 이내, 급수량 500㎥/일 미만
소규모급수시설 : 급수인구 100명 미만, 급수량 20㎥/일 미만

하수처리시설 현황

마을현황	하수처리		향후계획		계획유보마을
	시설수	마을수	시설수	마을수
264	54개소	140	4개소	34	90

※ 계획유보마을 : 하수처리인구수가 적고 가구가 산재되어 있어 현재 함양군 하수도기본계획에

미반영 (2025년 이후 하수도기본계획 변경 시 반영여부 결정)

500톤/일 이상

시 설 명	위 치	시설용량 (㎥/일)	설계유입수질 BOD(ppm)	처리구역 (마을)
계	3개소	11,300		45
함양하수처리시설	함양읍 용평리 27	9,600	184	26
수동하수처리시설	수동면 화산리 1162-5	800	158	8
안의하수처리시설	안의면 이전리 312	900	185	11

500톤/일 미만

시설수 (마을수)	시설용량 (㎥/일)	읍면	시설수	처리마을
51개소 (94개 마을)	3,951	함양읍	8개소	신기, 대병, 척지, 중촌·본백, 관동, 죽곡, 뇌산, 구룡·구만·조동·원구
		마천면	6개소	백무동·강청·실덕·도촌, 가흥이주단지, 의평·의중·금계, 창원, 당흥, 추성·뇌전
		휴천면	4개소	한남, 원기, 동호, 목현·금반·신기
		유림면	3개소	장항, 서주이주단지, 우동
		수동면	4개소	분덕, 분덕이주단지, 도북, 효리·가성·남계
		지곡면	6개소	시목, 공배, 정취, 문화·상개평·개평, 창촌, 전원마을(보산), 덕암·오평
		안의면	3개소	농월정, 동촌·안심, 마음·하비·유동·내동·사평·두평
		서하면	3개소	은행, 오현, 송계·신기
		서상면	7개소	방지, 추하·추상, 옥산, 복동, 육십령, 조산·신기·식송, 칠형정·도천·피적래·오산·맹동
		백전면	2개소	평촌·동백·서백, 대평·하백현·양천·음천
		병곡면	5개소	원산, 연서, 도천·월암, 마평, 가촌·휴촌· 송평· 덕평·토내·신기

Ⅱ		2020 업무추진 방향

항노화의 중심 함양 물 복지 실현

	전략목표
맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성
	단위사업
마을상수도 통합관리 시스템 구축으로 생활용수의 안정적 공급 지방상수도 급수구역 확대로 안정적인 맑은 물 공급 지방상수도 현대화사업 추진 하수처리시설 확대 추진 하수관로 정비 BTL사업 운영, 관리

1

1

삼정지구 하수도시설 설치사업

하수도담당 ☏ 5233

신규사업

❍ 지리산국립공원 인근은 관광객 방문이 많고, 남강댐 상류로

수질개선이 시급한 지역으로 생활하수의 완벽한 처리로 쾌적한

생활환경 조성

❍ 하수도 보급률을 획기적으로 신장시켜 공공수역 수질환경 보호

개    요

❍ 위    치 : 마천면 삼정리 일원

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

❍ 사 업 량 : 하수관거 3.1km, 하수처리시설 100㎥/일

❍ 사업혜택 : 3개 마을 / 143가구 244명(음정, 양정, 하정)

❍ 사 업 비 : 4,478백만원(국비 70%, 지방비 30%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합 계	4,478	130	257	2,046	2,045
국 비	3,135	-	180	1,478	1,477
지방비	1,343	130	77	568	568

추진실적

❍ 국비 확보를 위한 부처 협의(환경부, 낙동강유역환경청)	: 2019. 3월

❍ 하수도정비 기본계획 변경 협의	: 2019. 9월

❍ 실시설계	: 2019. 10월

추진계획

❍ 행정절차 이행(사업인가, 재원협의)	: 2020. 6월

❍ 사업 착공	: 2020. 8월

기대효과

❍ 쾌적한 농촌생활 환경 조성으로 군민의 삶의 질과 복지향상에 기여하고
공공수역의 수질 향상

1

2

정수시설 기술진단 개선사업

정수장담당 ☏ 5234

신규사업

❍ 정수시설 기술진단에 따른 시설물 개량 및 개선으로 맑고 깨끗한
양질의 수돗물 안정적 공급으로 군민 삶의 질 향상

개    요

❍ 위    치 : 함양·서상정수장

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 취수펌프 전동기 교체(40㏋×4대), 약품투입설비 개량 1식
침전지 방수도색(430㎡×2지), 여과지 여과사 교체(40㎥)

❍ 사 업 비 : 450백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
군 비	810	360	450	-	-

추진실적

❍ 정수시설 기술진단 용역	: 2019. 3월

❍ 기술진단 중간 보고	: 2019. 8월

❍ 기술진단 완료	: 2019. 10월

※ 취수펌프 과부하 등 67건 문제점 도출

추진계획

❍ 기술진단 용역 결과에 따른 실시설계 용역     : 2020. 1월

❍ 사업 착공	: 2020. 4월

기대효과

❍ 정수시설 시설정비 및 개선으로 맑고 깨끗한 수돗물 안정적 공급

1

1

광역마을상수도(유림지구) 설치사업

관리담당 ☏ 5231

일반계속사업

❍ 노후된 소규모 수도시설을 통합하여 광역마을상수도 설치

❍ 맑고 깨끗한 생활용수의 안정적 공급으로 군민 삶의 질 향상

개    요

❍ 위    치 : 유림면, 휴천면 일원

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5년간)

❍ 사 업 량 : 정수시설 470㎥/일, 취수시설 500㎥/일, 배수시설 V=300㎥
송수관로 L=4.12Km, 배수관로 L=18.61km, 급수관로 L=12.09km

❍ 급수혜택 : 13개 마을 / 460가구(1,076명)
(지곡, 손곡, 서주, 우동, 화촌, 장항, 회동, 유평, 옥산, 화암, 창촌, 판문, 동호)

❍ 사 업 비 : 10,956백만원(균특 70%, 군비 30%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합 계	10,956	3,000	1,857	1,857	4,242	-
균 특	7,669	2,100	1,300	1,300	2,969	-
군 비	3,287	900	557	557	1,273	-

추진실적

❍ 수도사업 인가	: 2017. 6월

❍ 총사업비 변경	: 2018. 1월
(당초 6,063백만원, 5개 마을 → 변경 10,956백만원, 13개 마을)

❍ 함양군관리계획 결정 및 지형도면 승인고시	: 2019. 2월
(함양군 광역마을상수도(유림지구) 설치사업)

추진계획

❍ 4차분 사업 착공 및 준공	: 2020. 1월 ~ 12월
(정수시설(Q=470㎥/일), 배수시설(V=300㎥), 취수시설(Q=500㎥/일), 배수관로 L=5.35km)

기대효과

❍ 노후된 소규모 수도시설을 통합하여 광역마을상수도 통합관리 시스템을 구축하여 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로서 군민 삶의 질 향상과 정주여건 고취

1

2

마을상수도 운영 및 정비사업

관리담당 ☏ 5231

일반계속사업

❍ 인구 노령화에 따른 수질 및 시설운영 전문업체 위탁운영

❍ 누수, 원수부족, 수질불량 시설에 개량 정비로 생활용수를 안정적으로
공급하여 군민 삶의 질 향상

개    요

❍ 위    치 : 함양군 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 시설현황 : 238개소(마을상수도 112, 소규모급수시설 126)

❍ 사 업 량 : 소규모 수도시설 개량 3개소, 유지관리 위탁용역 238개소,
유지보수 50개소, 지하수 사후관리 21개, 전기료 지원 228개소

❍ 사 업 비 : 2,471백만원(균특 26%, 군비 74%)

(단위 : 백만원)

구 분		합계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합계		13,850	2,633	2,471	2,471	3,137	3,138
소규모 수도 시설 개량사업	균특	3,533	600	500	500	966	967
	군비	1,513	257	214	214	414	414
운영 및 유지관리	군비	8,804	1,776	1,757	1,757	1,757	1,757

추진실적

❍ 마을상수도 전문업체 위탁관리(246개소)	: 2019. 1월

❍ 병곡 마평·휴천 목현마을 소규모 수도시설 개량사업 시행	: 2019. 2월
(급수혜택 : 196가구, 392명 / 관로 8.7km)

❍ 마을상수도 전기료 지원(군수 공약사업, 61백만원)	: 2019. 6월

추진계획

❍ 실시설계 시행	: 2020. 1월

❍ 사업 착공 및 준공(노후관 정비관로 7km)        : 2020. 2월 ~ 12월
- 함양 조동, 안의 새재, 서상 신기, 마천 음정

기대효과

❍ 마을상수도 시설개량 및 유지관리로 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로
공급함으로 군민 삶의 질 향상

1

3

함양군 지방상수도 현대화사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적
공급으로 삶의 질 향상

개    요

❍ 위    치 : 함양읍, 안의면, 지곡면 일원

❍ 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2021. 12월(5년간)

❍ 사 업 량 : 노후상수관로 44.1km 정비, 관망 유지관리시스템 구축
블록시스템 구축 11개소(함양 8, 안의 2, 서상 1)

❍ 사업목표 : 유수율 59% → 85%이상 달성(유수율 71.3% 2019.12.31.기준)

❍ 사 업 비 : 22,032백만원(국비 50%, 지방비 50%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합 계	22,032	5,386	7,285	6,610	2,751	-
국 비	11,280	2,907	4,643	2,305	1,425	-
도 비	132	132	-	-	-	-
군 비	10,620	2,347	2,642	4,305	1,326	-

추진실적

❍ 관로ㆍ시설물 전수조사, 관망도 전산화(GIS)	: 2017. 9월

❍ 블록시스템 구축 10개소 완료(11개소)	: 2019. 6월

❍ 안의면 노후관망 정비공사 착공(7.1km)	: 2019. 6월

❍ 함양읍 노후관망 정비공사 착공(12.6km)	: 2019. 12월

추진계획

❍ 함양읍 노후관망 정비공사 착공(24.4km)	: 2020. 1월

❍ 블록 관망감시 및 유지관리시스템 구축 완료        : 2021. 12월

기대효과

❍ 노후수도관 정비·개량을 통한 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로
공급함으로 주민 삶의 질 및 보건위생 향상

1

4

병곡지구 농어촌지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 마을상수도 공급지역인 병곡지구에 지방상수도 공급․확대를 통한
주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

개    요

❍ 위    치 : 병곡면 일원

❍ 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2021. 12월(5년간)

❍ 사 업 량 : 관로 28.2㎞, 배수지 1개소, 가압장 1개소

❍ 급수혜택 : 10개 마을 / 381가구(692명)
(송평, 가촌, 휴촌, 덕평, 토내, 소현, 신기, 상대평, 하대평, 백현)

❍ 사 업 비 : 9,953백만원(균특 70%, 군비 30%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합 계	9,953	3,001	1,857	1,857	3,238	-
균 특	6,967	2,100	1,300	1,300	2,267	-
군 비	2,986	901	557	557	971	-

추진실적

❍ 수도사업 인가	: 2017. 6월

❍ 사업 착공	: 2017. 6월

❍ 농어촌공사 옥계저수지 용수사용 계약	: 2019. 2월

❍ 가압장 1개소, 배수지 1개소, 관로매설 15.6km	: 2019. 9월

추진계획

❍ 4차분 사업 착공(관로 신설 6.5km)	: 2020. 1월

- 가촌, 휴촌, 덕평, 토내, 소현, 신기

기대효과

❍ 맑고 깨끗한 지방상수도를 안정적으로 공급하여 주민 생활불편 해소와
보건위생 향상 기대

1

5

지곡지구 농어촌지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 마을상수도 공급지역인 지곡지구에 지방상수도 공급ㆍ확대를 통한

주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

개    요

❍ 위    치 : 지곡면 일원

❍ 사업기간 : 2017. 9월 ~ 2021. 12월(5년간)

❍ 사 업 량 : 관로 37.9㎞, 가압장 3개소

❍ 급수혜택 : 14개 마을 / 592가구(1,032명)
(오평, 덕암, 마산, 수여, 봉곡, 중방, 시목, 창촌, 백일, 거평,주암, 계곡, 금호, 상백, 내백)

❍ 사 업 비 : 9,641백만원(균특 70%, 군비 30%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합 계	9,641	3,151	1,857	1,857	2,776	-
균 특	6,749	2,205	1,300	1,300	1,944	-
군 비	2,892	946	557	557	832	-

추진실적

❍ 수도사업 인가	: 2017. 8월

❍ 사업 착공	: 2017. 9월

❍ 가압장 1개소, 관로매설 14.3km	: 2019. 9월

추진계획

❍ 4차분 사업 착공(관로 신설 9.6km)	: 2020. 1월

- 백일, 창촌, 거평, 주암, 계곡

기대효과

❍ 맑고 깨끗한 지방상수도를 안정적으로 공급하여 주민 생활불편 해소와
보건위생 향상 기대

1

6

지방상수도 급수구역 확장사업(자체)

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 마을상수도 공급지역인 마을에 지방상수도 공급ㆍ확대를 통한

주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

개    요

❍ 위    치 : 병곡면, 안의면 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

❍ 사 업 량 : 관로 2.3㎞, 가정지선(20가구), 실시설계 1식

❍ 급수혜택 : 2개 마을(병곡 대광, 안의 방정) / 65가구(116명)

❍ 사 업 비 : 700백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
군 비	2,805	1,042	1,063	700	-	-

추진실적

❍ 서하 월평마을 사업 준공(관로 1.5km)	: 2019. 12월

❍ 서상 도천마을 사업 준공(관로 1.5km)	: 2019. 12월

❍ 안의 귀곡마을 사업 추진중	: 2019. 9월 ~ 2020. 8월

(관로 2km, 가압장 1개소)

추진계획

❍ 실시설계(대광·방정 관로 정비 2.3km)	: 2020. 2월

❍ 주민설명회(의견수렴)	: 2020. 3월

❍ 사업 착공(가정지선 20가구)	: 2020. 5월

기대효과

❍ 맑고 깨끗한 지방상수도를 안정적으로 공급하여 주민 생활불편 해소와
보건위생 향상 기대

1

7

함양군 마을 하수도 확충사업

하수도담당 ☏ 5233

일반계속사업

❍ 마을단위 하수도시설을 정비하여 공공수역 수질 보전 및 하수도

보급률 향상

❍ 생활필수기반 하수도시설을 설치·정비하여 주민 삶의 질 향상

개    요

❍ 위    치 : 안의면 월림리 일원

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월(5년간)

❍ 사 업 량

- 농월정지구 : 하수관로 4.1㎞, 중계펌프장 2개소

- 성북·황대마을 : 하수관로 2.4㎞, 중계펌프장 2개소

❍ 사업혜택 : 5개 마을 / 237가구 455명(성북, 황대, 월림, 방정, 고정)

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 70%, 지방비 30%)

(단위 : 백만원)

구 분		합계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합 계		5,000	396	1,228	408	1,483	1,485
농월정지구 농어촌하수	국 비	2,100	240	360	75	712	713
	지방비	900	91	154	122	266	267
성북·황대마을 하수관로	국 비	1,400	0	500	120	390	390
	지방비	600	65	214	91	115	115

추진실적

❍ 낙동강유역환경청과 하수처리 협의	: 2019. 7월
(안의하수처리시설 연계)

❍ 실시설계	: 2019. 10월

추진계획

❍ 행정절차 이행(사업인가, 재원협의)   : 2020. 3월

❍ 사업 착공 및 준공	: 2020. 3월 ~ 2022. 12월

기대효과

❍ 농월정지구, 성북·황대마을 하수도 설치사업으로 하천 수질개선 및 수자원 보호로 공공수역 수질을 보전하고 지역사회 공중위생 향상에 기여하여 쾌적한 주거환경 조성

1

8

하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영

하수도담당 ☏ 5233

일반계속사업

❍ 함양읍 BTL사업의 완벽한 추진 및 관리 기반 확립

❍ 하수관로의 효율적인 유지 관리로 쾌적한 생활환경 조성

개    요

❍ 위    치 : 함양읍 일원(운림, 교산, 용평, 백연, 이은)

❍ 운영기간 : 2017. 9월 ~ 2037. 9월(20년간)

❍ 사 업 량 : BTL사업(관로정비 30.5km, 배수설비 2,719개소) 임대료 1식

❍ 사 업 비 : 60,092백만원

(단위 : 백만원)

연차별 구 분		합계	2019 이전 (기투자)	2020년	2021년 이후
사업비	합 계	60,092	6,548	2,879	50,665
	임 대 료	47,795	5,202	2,389	40,204
	운 영 비	12,297	1,346	490	10,461
재원	국비	33,457	3,397	1,673	28,387
	기 금	8,603	873	399	7,331
	군비	18,032	2,278	807	14,947

추진실적

❍ 사업시행자 선정 및 실시협약 체결	: 2014. 11월

❍ 사업 완료 및 운영사업 착수	: 2017. 9월

❍ BTL사업 하자 보수(17건)	: 2019. 1월 ~ 12월

추진계획

❍ 하수관로 및 맨홀 점검, CCTV 및 연막 조사	: 2020. 2월 ~ 6월

❍ 우·오수관로 준설(수시)	: 2020. 3월 ~ 9월

❍ 하수관로 하자 보수(오접합, 누수관로 등)	: 2020. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 함양군 하수처리구역 내 하수관로를 철저히 관리하여 원만한 하수처리로 수질개선과 쾌적한 생활환경을 조성하고 모니터링시스템 구축

1

9

공공하수시설 운영 및 정비사업

하수도담당 ☏ 5233

일반계속사업

❍ 하수처리시설의 효율적 관리로 군민 보건 향상 및 수질환경 보호

❍ 지속적인 유지 관리로 생활하수의 안정적 처리체계 확립

개    요

□ 대    상 : 54개소(공공하수도 3개소, 소규모하수처리 51개소)

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 4,906백만원(기금 20%, 군비 80%)

(단위 : 백만원)

구 분	합계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합 계	25,501	3,977	4,665	4,906	5,619	6,334
기 금	5,379	868	971	962	1,180	1,398
군 비	20,122	3,109	3,694	3,944	4,439	4,936

추진실적

❍ 시설운영 및 시설물 개·보수            : 2019년 중 50회 실시

(하수처리장 51개소, 펌프장 70개소)

❍ 슬러지 위탁처리                        : 2019년 중 2,000톤

❍ 안전점검 실시                          : 2회(2019년 4월, 10월)

추진계획

❍ 통합관리시스템 용역 시행	: 2020. 1월

❍ 상·하반기 안전 점검	: 2020. 4월, 10월

❍ 처리장 운영(위탁) 및 시설물 유지, 보수	: 2020. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 원활한 하수처리를 통한 깨끗한 수질관리로 환경보호 및 남강댐 상류지역의 수질보전에 기여

1

10

함양군 정수장 운영 관리

정수장담당 ☏ 5233

일반계속사업

❍ 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 정수장시설의 유지 및 관리

❍ 수돗물의 생산 및 공급 과정을 실시간으로 감시하며 체계적인
품질관리로 수돗물의 신뢰성 향상 도모

개    요

❍ 위    치 : 함양·안의·서상정수장

❍ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 36개소(정수장 3, 가압장 20, 배수지 13)

❍ 사 업 비 : 1,037백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	합계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
군 비	5,034	984	888	1,037	1,050	1,075

추진실적

❍ 수돗물 생산 : 4,041,000㎥/년(함양 2,999,000㎥/년, 서상 1,042,000㎥/년)

⇒ 2018년도 대비 누수 절감 : 307,000㎥, 626백만원 절감

❍ 수돗물 수질검사 : 정수(주간 / 7개 항목 52회, 월간 / 59개 항목 12회)
수도꼭지(일반 / 4개 항목 12회, 노후관 / 10개 항목 12회)

❍ 시설물 유지관리 : 정수장 3개소, 배수지 13개소 청소
유량계 교정 19개소

추진계획

❍ 수돗물 생산(함양 8,000㎥/일, 서상 3,000㎥/일)	: 2020. 1월 ~ 12월

❍ 수돗물 수질검사(정수 64회, 수도꼭지 24회)	: 2020. 1월 ~ 12월

❍ 정수장 3개소, 배수지 13개소 유지관리	: 2020. 4월, 10월

기대효과

❍ 정수장 시설점검 및 유지관리로 맑고 깨끗한 수돗물 안정적 공급