안 전 도 시 과

Ⅰ. 기본현황	283

Ⅱ. 2020 업무추진 방향	285

Ⅲ. 2020 주요업무 계획

1. 신규사업

□ CCTV 운영안내 LED 조명 안내판 설치	287

□ 한남지구 자연재해위험지구 개선사업	288

□ 군민과 함께하는 안보통일 현장 견학	289

□ 함양군 전선 지중화사업	290

□ 군계획시설도로 개설공사	291

□ 우리동네살리기(인당) 도시재생사업 추진	292

2. 역점(특수)시책

□ 범죄사각지 해소를 위한 마을CCTV 안전망 구축	293

□ 화촌지구 풍수해위험 생활권 종합정비사업	294

□ 2025 함양군관리계획 재정비 용역	295

□ 아름다운 간판 개선사업	296

□ 엑스포 개최를 위한 옥외광고물 및 경관개선 사업	297

□ 엑스포 개최에 따른 시가지 도로환경 정비공사	298

□ 도시재생 뉴딜사업(용평리)	299

3. 일반계속사업

□ 재난 대응체계 구축 및 역량강화	300

□ 현장중심의 재난예방활동 추진	301

□ 재난관리 기금 운용	302

□ CCTV중심의 사회안전망 구축	303

□ 영상저장분배 서버(H/W) 증설	304

□ 여름철 물놀이 사망자 ZERO화 추진	305

□ 백전 119 지역대 신축	306

□ 경상남도 의용소방기술 경연대회	307

□ 생활 민방위 구현 및 통합방위태세 확립	308

자연재난 선제적 대응, 안전함양 건설	309

급경사지 붕괴위험지역 정비사업	310

태관천 재해위험지구 정비사업	311

도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역	312

자전거 둘레길 기반 조성 사업	313

군계획시설도로 개설공사	314

군계획시설물 유지관리 사업	315

소규모 재생사업(인당마을)	316

Ⅰ		기본현황

정․현원

구 분	계	안전건설 국 장	안전도시 과 장	안전민방위 담 당	복구지원 담 당	도시계획 담 당	도시개발 담 당	도시재생 담 당	관제센터 T F
정 원	25	1	1	6	4	4	4	3	2
현 원	24	1	1	5	3	4	4	4	2

기   능

구 분	분 장 사 무
안전민방위 담 당	❍ 안전관리기본계획 및 안전한국훈련 추진 ❍ 사회재난 상황관리 ❍ 재난취약시설 안전관리 ❍ 여름철 물놀이 안전관리 ❍ 통합방위 및 비상대비 업무 ❍ 민방위 계획수립 및 교육훈련 ❍ 사회복무요원 관리
복구지원 담 당	❍ 자연재난 종합상황실 운영 및 피해상황 종합관리 ❍ 재해장비관리 및 운영 ❍ 재해영향평가 및 사전 재해영향성 검토 협의 ❍ 재해위험지구 지정·관리 및 정비사업 시행
도시계획 담 당	❍ 군관리계획 입안, 재정비, 군계획시설 실시계획 인가 ❍ 장기미집행 군계획시설 보상 및 운영에 관한 사항 ❍ 경관, 공공디자인 업무 및 옥외광고물 관리
도시개발 담 당	❍ 도시개발 및 군계획시설 사업계획 수립 ❍ 군계획시설사업, 지구단위계획사업 시행 ❍ 군 계획시설물 유지 관리 및 미불용지 보상업무 ❍ 자전거이용시설 정비계획 관리와 사업의 시행
도시재생 담 당	❍ 도시재생 전략 계획 및 활성화 계획의 수립 ❍ 도시재생 거버넌스 구축 및 운영 ❍ 도시재생 뉴딜 소규모 재생사업 발굴 ❍ 도시재생 사업추진관련 주민, 관계부서, 기관 협의 등
관제센터TF	❍ CCTV 통합관제센터 운영

위원회 현황

위 원 회 명	위 촉 일	구 성 인 원(명)			주요기능
		계	당연직	위촉직
안전관리 위원회	2017. 2월	12	12	-	안전관리 정책의 심의 조정 안전관리계획 축제 심의
안전정책 실무조정위원회	2018. 8월	12	12	-	군 주관 지역축제의 안전관리계획 (공연법의 재해대처계획 포함)심의 등
안전관리 자문단	2018. 2월	8	-	8	재난취약시설 안전점검, 시설 등급 조정 시설안전자문 및 점검
재난관리 기금운용심의위원회	2018. 4월	9	6	3	기금의 운용계획 기금운용계획의 변경사항 기금의 결산
재해영향평가심의위원회	2017. 6월	20	2	18	각종 개발사업(행위) 등에 대한 사전재해영향성 검토
안전문화운동 추진 함양군 협의회	2018. 10월	20	5	15	안전문화운동 과제 발굴 실천
안전관리 민관협력 위원회	2017. 12월	13	3	10	지역차원의 민관협력관계 및 예방ㆍ 대비ㆍ복구등의 활동을 위한 구성
CCTV통합관제센터 운영위원회	2018. 8월	13	8	5	CCTV통합관제센터의 안전하고 효율적 운영
계획위원회	2017. 12월	20	8	12
옥외광고심의위원회	2018. 8월	13	5	8
지명위원회	2017. 9월	7	3	4

Ⅱ		2020 업무추진 방향

현장 중심, 안전한 함양, 군민 행복

	전략목표
현장 예방 중심의 안전관리 체계 구축 재난·안전관리 역량 강화 군민안심 재난안전 인프라 확충 지역발전 견인을 위한 전략사업 발굴 비상대비 통합방위태세 확립 도시 균형 발전 및 성장발전 방안 수립 도시기반시설 확충으로 편리한 주거환경 조성
	단위사업
선제적 재난안전관리시스템 구축 군민과 함께하는 생활안전운동 군민안심 CCTV 통합관제센터 운영 재해복구 및 재해예방사업 투자 확대 지역민방위 활동지원 및 역량 강화 군관리 계획의 효율적 관리로 군민의 재산권 보호 간판 및 경관디자인 개선으로 아름다운 도시 조성 안전하고 친환경적인 도시계획도로 및 시설의 확충 도시재생 뉴딜사업을 통한 원도심 활성화 살기 좋은 친환경적인 아름다운 주거환경 조성

1

1

CCTV 운영안내 LED 조명 안내판 설치

관제센터TF담당 ☏ 5206

신규사업

❍ 군민의 생명과 재산을 보호하고자 운영중인 방범용 CCTV에
야간 명시성 강화를 위한 LED 조명 안내판 설치

❍ 사후 기능보다 사전 예방기능 강화로 안전한 함양 조성

추진방향

❍ 기존 설치 CCTV에 대하여 연차적으로, 안내 LED 간판 설치 추진

❍ 야간에 CCTV 위치와 촬영 중임을 알려주어 범죄발생 요인을
근원적으로 차단하여 주민생활 안전 환경 조성

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 3월 ~ 12월

❍ 소요예산 : 50백만원

❍ 설치지역 : 범죄발생 우려지역 및 농촌마을

❍ 설치개수 : 50개

❍ 설치형태 : LED 조명 안내판

기대효과

❍ CCTV의 야간 작동에 대한 시인성 강화로 범죄 가능성 억제

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포 대비 방문객 및 군민 안전 도모

1

2

한남지구 자연재해위험지구 개선사업

복구지원담당 ☏ 5202

신규사업

❍ 집중호우 시 임천 주변마을 농경지 침수방지

❍ 상습침수구역에 대한 항구적인 예방대책과 안전주거환경 조성

사업개요

❍ 위    치 : 휴천면 남호리 771번지 일원

❍ 사 업 량 :

- 축제 및 제방정비 L=3.46㎞, 국지도 재가설 L=850m

- 교량 3개소, 보 재가설 1개소 등

❍ 사 업 비 : 33,860백만원(국비16,930, 도비5,079 군비11,851)

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2024. 12월(5년간)

❍ 연차별 투자계획

(금액 : 백만원)

구분	계		2020년		2021년		2022년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	ㆍ하천정비 L=3.46㎞ ㆍ도로 L=0.8㎞ ㆍ교량 3 개소 등	33,860	ㆍ기본 및 실시설계 1식	100	ㆍ기본 및 실시설계 ㆍ보상1식	1,400	ㆍ하천정비 L=3.46㎞ ㆍ교량3개소 등	32,360
국비		16,930		-		700		16,230
도비		5,079		-		210		4,869
군비		11,851		100		490		11,261

추진계획

❍ 한남 자연재해위험개선지구 지정	: 2019. 11월

❍ 하류부 구간 자연재해위험개선지구 확대지정	: 2020. 5월

❍ 실시설계용역 발주	: 2020. 9월

❍ 한남 자연재해위험개선지구 정비사업 착공	: 2022. 1월

기대효과

❍ 인명(51세대, 107명) 및 재산(건물 52동, 도로0.8km) 보호

1

3

군민과 함께하는 안보통일 현장 견학

안전민방위담당 ☏ 5201

신규사업

❍ 안보통일 현장 견학을 통한 안보의식 확립

❍ 국가안보 및 평화통일의 중요성에 대한 군민들의 공감대 형성

개    요

❍ 견학시기 : 2020. 6월

❍ 장    소 : 안보 현장

❍ 대    상 : 군민 30명 정도

❍ 내    용 : 안보현장 견학, 현지해설사 안내 등

추진계획

❍ 안보현장 사전답사 및 계획 수립	: 2020. 4월

- 안보현장 : 전쟁기념관, 군부대시설, 호국원 등

❍ 교육대상자 선정	: 2020. 5월

❍ 안보현장 견학 실시	: 2020. 6월

- 현지해설사 안내를 통한 안보지식 습득

기대효과

❍ 군민들의 확고한 안보의식 및 국가관 확립

❍ 국가안보 및 통합방위의 중요성에 대한 공감대 형성

1

4

함양군 전선 지중화사업

도시개발담당 ☏ 5204

신규사업

❍ 도시계획 구역 및 간선(지선) 도로변에 고압전주, 통신주 등 무질서한
전선으로 도시미관 저해요인이 되고 있어 지중화 사업을 통하여 도시주변환경을 개선하고자 함

사업개요

❍ 사 업 량 : 함양읍 5개소 / L=5.61km

- 금회 L=1.0km 중로2-2호선(시외버스터미널 ~ 돌북교)

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월(4년)

□ 사업비 투자계획 : 22,185백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년 (설계비)	2021년 (공사비)	2022년 (공사비)	2023년 (공사비)	비고
계	22,185	1,144	7,013	7,014	7,014
한전 부담금	4,679	572	1,369	1,369	1,369
지자체 부담금	17,506	572	5,644	5,645	5,645

※ 통신관로 개설 사업비는 별도 협의

추진실적 및 계획

❍ 4개년 지중화 기본계획 수립	: 2019. 7. 20.

❍ 지자체 요청 지중화사업계획(기본계획) 제출	: 2019. 7. 31.
(한국전력공사 경남본부 함양지사 전력 공급팀)

❍ 지자체 요청 지중화사업계획(기본계획) 검토 제출	: 2019. 8월
(함양지사 → 한국전력공사 경남지역본부)

❍ 대상사업장 심의 및 확정	: 2019. 12월

❍ 1회 추경예산 편성 및 실시설계용역 시행	: 2020. 5월

❍ 사업시행(연차별)	: 2020년 ~ 2023년

기대효과

❍ 안전한 보행공간 확보 및 도시미관 향상

❍ 태풍 등 자연재해 및 화재의 위험성으로부터 안전사고예방

1

5

군계획시설도로 개설공사

도시개발담당 ☏ 5204

신규사업

❍ 주민불편이 가중되는 장기미집행 군계획시설도로 개설

❍ 도시기반시설 확충으로 안전하고 편리한 도시환경조성

사업개요

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	위 치	사업량	사업비	비 고
계	2건			200
도로 개설 사업	원교 군계획시설도로 (소로2-88,3호선) 개설공사	함양읍 교산리 (국도전기~상림팰리스)	L=240m, B=8m	150	보상비 (도비보조)
	백연 군계획시설도로 (소로2-40호선) 개선공사	함양읍 백연리 (함양공설운동장 옆 길)	L=140m, B=8~15m	50	설계비

추진실적 및 계획

❍ 원교 군계획시설도로(소로2-88, 3호선) 개설공사

- 주민설명회 실시 : 2019. 9. 20.

- 감정평가 실시 : 2019. 11월

- 보상 협의 : 2020. 1월 ~ 3월

- 사업 착공 및 준공 : 2020. 3월 ~ 12월

❍ 백연 군계획시설도로(소로2-40호선) 개선공사

- 실시설계용역 시행 및 완료 : 2020. 1월 ~ 3월

- 1회추경 예산 사업비 확보 : 2020. 5월

문 제 점

❍ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제48조에 따라 고시일로부터 20년 경과 시 효력이 상실됨에 따라 조기개설 필요

※ 결정 고시일의 기산일 2000년 7월 1일(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 부칙 제16조)

기대효과

❍ 주민불편이 가중되는 장기미집행 군계획시설도로 개설

❍ 도시기반시설 확충으로 안전하고 편리한 도시환경조성

1

6

우리동네살리기(인당) 도시재생사업 추진

도시재생담당 ☏ 5205

신규사업

❍  인구감소 등으로 쇠퇴중인 인당마을에 마을자원을 활용한 6차 산업으로
소멸하지 않고 지속가능한 농촌마을 맞춤형 재생사업

사업개요

❍ 사 업 명 : 함양을 잇는 인당마을

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년

❍ 사업유형 : 우리동네살리기(광역선정분)

❍ 사업면적 : A=51,213㎡

❍ 사 업 비 : 8,800백만원(국비 4,980 도비 996 군비 2,324 기금 500)

사업내용

❍ 인당 더 건강한 센터 플랫폼 구축

- 마을공영주차장조성, 태양광 미니 발전소 조성

❍ 미래를 잇는 인당마을 가꾸기

- 집수리 지원사업 10가구, 무장애 안심 골목길 조성

❍ 과거를 잇는 인당마을 아카이빙 사업

- 마을흔적 표지석 및 마을흔적 갤러리 조성

❍ 콩삼이 파밍스페이스 조성

- 경로당, 장독보관소 및 체험하우스 조성

추진실적 및 계획

❍ 하반기 우리동네살리기 공모사업 신청(군→경상남도)	: 2019. 8. 2.

❍ 광역선정분 실행계획(안) 제출(경상남도→국토교통부)	: 2019. 9. 2.

❍ 적격성 심사, 실현가능성 및 타당성 평가	: 2019. 11. 21.

❍ 국토교통부 최종 승인 통보	: 2019. 12. 24.

❍ 사업시행	: 2020. 1월

기대효과

❍ 도시재생 뉴딜사업을 통한 공동체 거점기반 조성과 생활환경 개선

❍ 주거여건 및 삶의 질 개선, 일자리 창출 등 지속가능한 마을 경제기반구축

1

1

범죄사각지 해소를 위한 마을 CCTV 안전망 구축

관제센터TF담당 ☏ 5206

역점 및 특수시책

❍ 마을 강력범죄 증가에 따른 CCTV 설치 요구 증가

❍ 마을 경계지점 CCTV 설치 및 통합관제센터 연계

사업개요

❍ 사업범위 : 관내 마을 입구 256개소

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년

❍ 사 업 량 : 206대(마을당 CCTV 1대)

❍ 사업내용 : CCTV, 라이센스 등

❍ 소요예산 : 2,154백만원

- CCTV 206대, 관제센터 운영 라이센스 206개

추진실적

❍ 2019년 설치사업

- 사 업 비 : 622백만원

- 사 업 량 : CCTV 50대, 라이센스 50개, 스토리지 1식

추진계획

❍ 마을 경계지점 대상 4개년 계획으로 2년차 사업추진

(단위: 백만원)

구 분	합 계	2020년	2021년	2022년
소요예산	1,441	300	700	441
마을수	206 마을	43개 마을	100개 마을	63개 마을
상세내역	CCTV 206대 라이센스 206개	CCTV 43대 라이센스 43개	CCTV 100대 라이센스 100개	CCTV 63대 라이센스 63개

기대효과

❍ 수확기 농산물 절도 및 범죄사각지 대상 예방 안전망 확보

❍ 주민 불안요소 해소로 안전한 주거환경 기여

1

2

화촌지구 풍수해위험 생활권 종합정비사업

복구지원담당 ☏ 5202

역점 및 특수시책

❍ 화촌천(지방하천), 장항천(소하천) 호우 시 하천범람과 배수배제 불량

❍ 상습침수 구역에 대한 항구적인 예방대책과 안전한 주거환경 조성

사업개요

❍ 위    치 : 유림면 화촌리, 장항리 일원

❍ 사 업 량 : 축제 L=2,464m, 호안설치 L=720m, 교량 재가설 18개소
펌프장(Q=240㎥/min) 2개소, 유수지V=10,800㎥, 배수로L=1,300m

❍ 사 업 비 : 32,138백만원(국비16,069 도비4,821 군비11,248)

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2024. 12월(5년간)

❍ 연차별 투자계획

(금액 : 백만원)

구분	계		2020년		2021년		2022년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	ㆍ하천정비 L=2.4 ㎞ ㆍ배수장 2개소 ㆍ교량 18 개소 등	32,138	ㆍ기본 및 실시설계 1식 ㆍ보상 1식	1,300	ㆍ보상1식 ㆍ하천정비 L=0,4㎞	3,000	ㆍ하천정비 L=2,4㎞ ․배수장 2개소 등	27,838
국비		16,069		650		1,500		13,919
도비		4,821		195		450		4,176
군비		11,248		455		1,050		9,743

추진계획

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 시행	: 2020. 1월

❍ 행정안전부 중앙전문가 실시설계 심의	: 2020. 10월

❍ 토지보상 협의 실시 및 인·허가 협의 완료	: 2021. 5월

❍ 화촌지구 풍수해위험 생활권 종합정비사업 착공	: 2021. 6월

기대효과

❍ 주거지 및 농경지 보호(56ha), 인명 보호(35가구 70명)

❍ 상습침수지역 정비로 주민 소득증대에 기여

1

3

2025 함양군관리계획 재정비 용역

도시계획담당 ☏ 5203

역점 및 특수시책

❍ 지속가능한 도시계획의 장기구상 비전제시를 위한 군관리계획 수립

❍ 상위계획의 개발전략 및 부문별 계획 수용을 통한 실천적 방안 제시

사업개요

❍ 재정비 범위

	공간적 : 1읍 10면(724.9㎢)
	시간적 : 기준년도 2017년, 목표연도 2025년
	내용적 : 군 관리계획 재정비, 도시계획정보체계구축, 전략환경성평가 ☞ 용도지역·용도구역 변경, 군계획시설 정비, 재해취약성 분석 등 중점

❍ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

합 계		기시행		2019년		2020년
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
재정비 용 역	1,167	1차분	188	2차분	500	3차분	479

추진실적 및 계획

❍ 입안(일몰제 폐지시설) : 2019. 9월

❍ 주민설명회(일몰제 폐지시설) : 2019. 9월 ※ 도시지역(함양·안의·서상)

❍ 결정고시(일몰제 폐지시설) : 2019. 12월

❍ 입안(용도지역 및 변경대상) : 2020. 1월

❍ 주민공청회 및 의회의견청취 : 2020. 1월 ~ 2월

❍ 함양군계획위원회 심의 : 2020. 3월

❍ 경남도 결정신청(용도지역 및 변경대상): 2020. 4월

❍ 상급기관 협의절차 이행: 2020. 4월 ~ 6월

❍ 경남도 도시계획위원회 심의 및 결정(고시) : 2020. 7월 이후

기대효과

❍ 합리적 토지이용계획 수립으로 함양군의 도시발전 장기구상 기여

❍ 2020. 7. 1. 일괄실효 시기 이전 장기미집행시설의 집행이 불가능하거나
필요성이 낮은 군계획시설은 폐지 또는 변경

1

4

아름다운 간판 개선사업

도시계획담당 ☏ 5203

역점 및 특수시책

❍ 2020 엑스포를 찾는 관광객에게 아름다운 함양 이미지 부각

❍ 무분별하게 설치된 간판을 일제 정비하여 아름다운 시가지 조성

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 6월 ※ 엑스포 이전 완료

❍ 사 업 비 : 640백만원(국비 250, 도비 42, 군비 348 ☞ 자부담포함 32)

❍ 사업내용                                         (단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	위 치	사업량	사 업 비		비고
계	2건			640 (기금250,도42,군348)
국비보조사업	굿모닝 함양로 간판개선사업	함양읍파 ~동문사거리 ~함중사거리	간판정비 172개	계	500
				기금	250
				군비	250
도비보조사업	엑스포 함양로 간판개선사업	동문사거리 ~낙원사거리	간판정비 45개	계	140
				도비	42
				군비	98

추진실적 및 계획

❍ 2020 굿모닝함양로 간판개선사업 공모 신청	: 2019. 7월

❍ 굿모닝함양로 간판개선사업 대상지 확정(1차)	: 2019. 8. 16.

❍ 세부사업계획 수립	: 2019. 8월 ~ 11월

❍ 간판사업 최종대상지 확정	: 2019. 12월

❍ 디자인 설계용역	: 2019. 12월 ~ 2020. 2월

❍ 간판설치 공사 착공	: 2020. 3월

❍ 공사준공	: 2020. 6월

기대효과

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포를 찾는 관광객에게 아름다운 함양 이미지 부각

❍ 도시미관 개선을 통한 관광객 유입 증가로 지역경제 활성화에 기여

1

5

엑스포 개최를 위한 옥외광고물 및 경관개선 사업

도시계획담당 ☏ 5203

역점 및 특수시책

❍ 엑스포의 성공적 개최를 위한 시가지 및 주요 간선도로 정비

❍ 간판개선사업과 연계한 경관개선으로 아름다운 도시미관 조성

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 6월

❍ 사 업 비 : 445백만원

❍ 사업내용                                                 (단위 : 백만원)

사 업 명	사업위치	사 업 량	사업비	비고
계	3건		445
주요간선도로 안내표지판 정비 사업	함양군	연립형 안내표지판 15식	225
현수막 게시대 군정지표 교체 사업	지정게시대	군정지표 교체 69개	55
현수막 게시대 설치 사업	함양군	지정게시대 설치 11개소	165

추진계획

❍ 주요간선도로에 산발적으로 설치된 지주간판을 연립간판으로 정비

❍ 지정게시대 상단의 군정지표 교체

- 산삼의고장 물레방아골 함양 → 예) 굿모닝지리산 함양

❍ 불법현수막 게시가 빈번한 주요 위치에 현수막 게시대 설치ㆍ운영

기대효과

❍ 시가지 및 주요간선도로 정비로 2020 함양산삼항노화엑스포의 성공적 개최에 기여

❍ 아름다운 간판개선사업과 연계한 경관개선으로 깨끗한 도시미관 조성

1

6

엑스포 개최에 따른 시가지 도로환경 정비공사

도시개발담당 ☏ 5204

역점 및 특수시책

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포를 성공적으로 추진하기 위해 함양읍 시가지 도로환경을 개선 및 정비

사업개요

(단위 : 백만원)

구 분		사 업 명	위 치	사업내용	총사업비	비 고
계		3건			9,896
엑스포 연계	환경정비	함양읍 시가지 도로환경 정비공사	함양읍 일원	재포장 및 차선도색 L=6km	1,950	공사비
	도로개설	교산 군계획시설도로 (소로2-6호선) 개설공사	함양읍 교산리 (함양농협 진고개지점 ~ 지오모텔)	L=350m, B=21m	6,530	공사비
		교산 군계획시설도로 (소로1-3호선) 개설공사	함양읍 교산리 (함양웰가센트뷰APT옆 ~ 함양교산휴먼시아APT)	L=260m, B=10m	1,416	공사비

추진실적 및 계획

❍ 함양읍 시가지 도로환경 정비공사 실시설계용역 시행 및 완료 : 2019. 10월 ~ 12월

❍ 착공 및 준공

- 교산 군계획시설도로(소로2-6, 1-3호선) 개설공사 : 2019. 8월 ~ 2020. 8월

- 함양읍 시가지 도로환경 정비공사 : 2019. 3월 ~ 6월

※ 엑스포 개최 이전까지 정비 및 개설완료

기대효과

❍ 엑스포 개최 시 방문하는 관광객들에게 함양군의 깨끗한 이미지 제공

❍ 행복주택 및 함양웰가센트뷰APT 신축으로 인해 가중되는 교통량 해소

1

74

도시재생 뉴딜사업(용평리)

도시재생담당 ☏ 5205

역점 및 특수시책

❍ 천혜의 경관(빛·물·바람·흙)과 특화자원(항노화)를 활용한 지역 경쟁력
회복 및 공동체 활성화

❍ 도시재생 뉴딜사업을 통한 원도심 활성화

사업개요

❍ 사 업 명 : 빛·물·바람·흙 함양 항노화 싹틔우기

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

❍ 사업유형 : 일반근린형(광역선정분)

❍ 사업규모 : A=153,029㎡

❍ 사 업 량 : 한들 도시재생 거점센터 신축 1식, 불로장생길 특화거리
조성 및 골목경제활성화사업, 문화곡간사업 등

❍ 사 업 비 : 16,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년
계	16,500	3,423	3,537	3,654	5,886
국 비	9,900	2,054	2,122	2,192	3,532
도 비	2,000	411	424	438	727
군 비	4,600	958	991	1,024	1,627

추진실적 및 계획

❍ 도시재생지원센터 구성	: 2019. 4. 1.

❍ 도시재생 거점조성(한들거점센터) 실시설계용역 및 착공	: 2020. 2월

❍ 불로장생길 특화거리 조성 및 골목경제활성화사업 착공	: 2020. 6월

❍ 함양시장 및 쌀전 항노화 문화곡간사업 착공	: 2020. 5월

❍ 무장애 안심골목 정비사업 착공	: 2020. 4월

❍ 도시재생 기록화(아카이빙) 사업	: 2020. 5월

기대효과

❍ 도시재생 뉴딜사업을 통한 함양시장 골목상권 정비와 주거여건, 삶의 질 개선, 일자리 창출 등 지속적인 상생 협력을 통한 원도심 활성화

❍ 주민역량 강화 및 주민공동체 활성화

1

1

재난 대응체계 구축 및 역량강화

안전민방담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 선제적·근원적 안전관리 대책수립 및 재난대응 역량 강화로
군민의 생명과 재산보호

사업개요

❍ 재난상황실 운영 등 신속한 대응체계 유지

❍ 실효성 있는 안전관리계획 수립 및 현장조치 행동매뉴얼 정비

❍ 유관기관·단체 참여 확대로 군민 참여형 안전한국훈련 실시

❍ 시기별, 테마별 안전사고예방을 위한 안전문화운동 확산 추진

추진계획

❍ 재난상황실 운영 : 24시간 상시 가동

❍ 안전관리계획 수립 및 관리내실화 추진 : 연중

❍ 현장조치 행동매뉴얼 정비 및 점검 : 연중

❍ 전국동시 재난대응 안전한국훈련 실시 : 10월 예정

- 유관기관·단체 참여 확대로 민·관협력 컨트롤 타워 구축

❍ 군민 안전의식 고취를 위한 안전문화운동 전개

- 안전점검의 날 운영 : 매월 1회

- 시기별□분야별 안전관련 예방 홍보물 제작(배부)

- 안전취약계층(노인·장애인·유아) 재난안전교육 실시 : 연 5회 이상

기대효과

❍ 체계적 안전훈련 및 안전관리로 재난대응 역량 강화

❍ 안전문화운동 활성화로 군민 안전의식 고취

1

2

현장중심의 재난예방활동 추진

안전민방담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 재난취약시설 안전점검을 통한 재난 예방활동으로 군민의 생명과 재산 보호

사업개요

❍ 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 대상 시설물 : 91개소
(교량, 문화 및 집회시설, 지방상수도, 공동주택, 옹벽, 기타 건축물 등)

❍ 어린이 놀이시설 : 23개소(도시공원 4, 어린이집 7, 기타 12)

❍ 범죄발생 우려지역 공중화장실 비상벨 설치 : 3개소(12백만원)

추진계획

❍ 국가안전대진단

- 시설물 점검 : 197개소(민관합동점검 97, 자체점검 100)

❍ 설·추석 대비 다중이용시설 안전점검 : 5개소(터미널 3, 재래시장 2)

❍ 해빙기 취약시설 안전점검 : 매년 3 ~ 4월

❍ 어린이 놀이시설 설치검사 지도ㆍ점검 : 2회(분기별 1회)

- 놀이터 배상책임보험, 안전관리자 정기교육

❍ 시특법 시설물 안전관리

- 대상시설 안전점검 월별 계획 수립

❍ 여름철 물놀이 안전사고 예방순찰 강화

- 관리지역(12개소), 안전장비·용품 배부, 안전관리요원 배치

❍ 공중화장실 비상벨 설치사업 대상지선정 및 시행 : 4월 ~ 6월

기대효과

❍ 시설물 안전점검으로 재난관리 강화

❍ 현장중심의 예방활동 강화로 인명과 재산피해 최소화

1

3

재난관리 기금 운용

안전민방위담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 재난 및 안전관리 사전예방과 응급복구 및 재난예방활동

❍ 재해·재난 예방과 재해·재난 발생시 긴급 예산투입사업 시행

개    요

❍ 근    거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 함양군 재난관리기금조례

❍ 설치년도 : 1997년 1월 1일
(조례 제1664호 2005년 2월 25일 재난관리기금 및 재해대책기금 통합)

❍ 적립재원 : 법정적립액으로 최근 3년 보통세 수입결산액
평균연액의 1%(2020년 148백만원)

추진계획

❍ 재원현황

(단위: 백만원)

2019년도 조성액	2020년도 계획		2020년도 조성액	비 고
	수입	지출
463	385	402	410

주요사업계획

❍ 재난 재해 예방 홍보 및 대비	: 12백만원

❍ 재난예방 및 복구사업비(자체)	: 82백만원

❍ 재난예방 사업(도 기금 보조)	: 238백만원(도 185, 군 53)

기대효과

❍ 재해·재난 예방 및 발생시를 대비한 긴급사업비 확보

❍ 재해·재난예방 보조사업에 대한 예산 운영

1

4

CCTV 중심의 사회안전망 구축

관제센터TF담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 우범지역과 사고 발생 다수지역 방범 CCTV 설치

❍ 관광지 및 어린이보호구역 일대 노후 CCTV 교체

현    황

❍ 통합관제센터 운영 현황 : 300개소 571대

합계	방범	마을	어린이	문화재	교통	차량 인식	주정차	시설물	재난	학교
571	179	52	122	77	8	33	12	10	18	60

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 10월

❍ 사 업 량

- 방범 CCTV 설치 : 31대(차번인식 6대, 신규설치 25대)

- 노후 CCTV 교체 : 10대

❍ 소요예산 : 300백만원

- 차번인식 25백만원 ×  4대 = 100백만원

- 신규설치 10백만원 × 10대 = 100백만원

- 노후교체 5백만원  × 20대 = 100백만원

추진계획

❍ 방범CCTV 설치 장소 협의(함양경찰서, 읍·면)	: 2020. 1월

❍ 행정예고 및 보안성 검토 등 행정절차 시행	: 2020. 2월

❍ 방범CCTV 신규 설치 및 통합관제센터 수용	: 2020. 3월 ~ 6월

❍ 노후CCTV 교체 및 관리	: 2020. 7월 ~ 10월

기대효과

❍ 범죄 취약계층에 대한 사회안전망 확보

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포 등 방문객 안전망 확보

1

5

영상저장분배 서버(H/W) 증설

관제센터TF담당 ☏ 5206

일반계속사업

❍ 관내 CCTV 카메라가 지속적으로 증가함에 따라 영상 저장분배 서버 장치 증설을 통해 안정적인 시스템 운영

추진방향

❍ CCTV 통합관제센터 영상 1대의 저장일수 30일, 현재 539대

❍ 증가하는 영상 저장 공간 증설

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 10월

❍ 사 업 량 : 영상저장 분배 서버 1식

❍ 내    용

- CPU : 2.9Ghz 이상 X 2 core

- MEM : 128G 이상

- HDD : 300G 2개

❍ 소요예산 : 30백만원

- 서버 : 30백만원 × 1식 = 30백만원

추진계획

❍ 보안성 검토	: 2020. 1월

❍ 조달 구입 및 설치	: 2020. 3월

기대효과

❍ 영상 저장정보 안정적 관리 및 운용으로 범행증거 확보 및 제공

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포 대비 방문객 안전 도모

1

6

여름철 물놀이 사망자 ZERO화 추진

안전민방위담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 여름철 물놀이 안전사고에 적극 대응하여 안전사고 발생 예방

❍ 인적사고 예방과 피해경감 추진으로 사망사고 선제적 대응

❍ 사고지역 점검 및 시설 보완 추진

추진개요

❍ 기  간 : 2020. 6. 1. ~ 8. 31.

❍ 대상지 : 함양군 관내 하천, 계곡 등 물놀이 지역일원

❍ 소요예산 : 248백만원 정도

❍ 주요 사업내용

- 용추계곡 등 안전관리지역 12개소 지정 특별관리

- 안전관리요원 배치 : 40명(읍면 유급 20명, 119수상구조대 20명)

- 안전시설 정비 : 8종, 600여개(구명조끼, 구명환, 로프 거치대 등)

- 사고지역 시설 보완 등

추진현황

❍ 물놀이 사망사고 발생내역

합 계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
5	1	-	2	-	2

※ 2019년 사망자 모두 음주 후 입수로 사망

문제점

❍ 방문자 안전수칙 미준수(구명조끼 미착용, 음주 등) 및 안전불감증 만연

❍ 하천 특성상 관리구역은 많으나 관리요원 가시면적이 좁아 이동
감시에 따른 사각지대 발생

❍ 사고지역 재사고 발생 빈번

개선대책

❍ 물놀이객에게 안전수칙 적극 홍보

❍ 예산 추가확보로 물놀이 안전관리요원 증원 및 안전시설 확충

❍ 안전관리요원 봉사전문교육 강화

1

7

백전 119지역대 소방서 신축

안전민방위담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 백전 119지역대 소방서 신축으로 화재발생 시 골든타임 확보

❍ 소방 사각지대를 해소함으로써 군민의 생명과 재산 보호

사업개요

❍ 사 업 명 : 함양소방서 백전 119지역대 소방서 신축

❍ 위    치 : 백전면 평정리 357-3

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 부지제공 : 함양군

❍ 청사건립 : 건축 530㎡(지상 2층) / 2,000백만원 정도(도 소방본부)

추진계획

❍ 기본설계 및 실시설계 추진 : 2020. 1월

□ (인력충원) 2021년 기준인건비 반영 요구 → 소방청, 행정안전부

- 인력충원 절차

충원계획		충원 및 직제조정		기준인건비 요구		기준인건비 확정
도지사 방침	➡	정원조례 개정	➡	소방청 → 행정안전부	➡	행정안전부 → 소방청
2020년 1월		2020년 상반기		2020년 하반기		2020년 12월

□ 기준인건비 등 조직 구성 반영에 맞춰 사업 추진

기대효과

❍ 화재 발생 등 사건 발생 시 골든타임 확보 유리

❍ 소방 수혜 사각지대 해소로 소방행정 소외지역 극복 및 삶의 질 향상

1

8

경상남도 의용소방기술 경연대회

안전민방위담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 경남 의용소방대원의 현장대응능력 향상 및 대원 화합

❍ 엑스포 기간 중 경연대회 실시로 함양군 홍보 확대

개    요

❍ 일    시 : 2020년 9월 ~ 10월

❍ 장    소 : 상림공원 일원

❍ 참    여 : 2,500여명(내빈 및 소방공무원 200명, 소방대원 2,300명)

❍ 예 산 액 : 55백만원 정도

- 무대, 음향시설 설치 등 : 33백만원

- 식비 및 음료 : 10백만원

- 시상금 및 기념품 : 12백만원

❍ 주요내용

- 소방기술 경연종목 : 2개 종목 3개 분야

·개인 : 소방호스 끌기(남 / 여)

·단체 : 수관연장 및 방수자세, 개인장비 착용 및 릴레이

- 화합마당(소화수 나르기, 큰 공 굴리기, 노래자랑 등)

기대효과

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포 기간 내 대회실시로 함양군 이미지 제고

❍ 함양지역 농특산물 홍보 및 지역경제 활성화 도모

1

9

생활 민방위 구현 및 통합방위태세 확립

안전민방위담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 실전에 강한 생활민방위 구현

❍ 비상사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 통합방위태세 확립

개    요

❍ 민방위 교육, 훈련 실시 및 민방위 시설ㆍ장비 관리

❍ 지역 통합방위 태세 확립을 위한 회의ㆍ훈련ㆍ연습 실시

추진계획

❍ 민방위 교육 및 소집

- 시    기 : 정기 1회(4월중), 보충 2회(9 ~ 11월중)

- 대    상 : 교육(1 ~ 4년차, 통리장) 700여명, 소집(5년차 이상) 900여명

❍ 전국단위 및 지역특성화 민방위훈련

- 훈련횟수 : 연 6회

- 내    용 : 화재대피, 지진대피, 지역특성화(복합재난) 훈련

❍ 민방위 시설ㆍ장비 관리

- 비상대피시설(10개소), 비상급수시설(2개소), 경보시설(1개소) 정기점검

- 민방위장비(2,507점) 일제점검 연2회

❍ 비상대비 업무추진

- 통합방위협의회 운영 및 중점관리자원 확인의 날 행사 : 분기별 1회

- 을지태극연습(5월), 화랑훈련, 군부대 통합방위훈련 지원

❍ 안보의식 함양

- 공직자 안보통일 교육 및 현장체험 : 연 2회

- 대군민 안보의식 함양 행사 : 장비 및 사진 전시, 교육, 체험행사

기대효과

❍ 생활 민방위 육성을 통한 실전 대응능력 향상

❍ 훈련ㆍ연습을 통한 비상대비 대응태세 확립

1

10

자연재난 선제적 대응, 안전함양 건설

복구지원담당 ☏ 5202

일반계속사업

❍ 신속한 자연재난 대응체제 구축으로 군민의 생명‧재산 보호

❍ 자연재난 예방과 피해경감 추진으로 자연재난 선제적 대응

추진목표

❍ 인명·시설물 피해 없는「안전함양 건설」

중점 추진기간

❍ 여름철(호우·태풍, 폭염) : 2020. 5. 15. ~ 10. 15.

❍ 겨울철(대설) : 2020. 11. 15. ~ 3. 15.

❍ 지  진(년중) : 2020. 1월 ~ 12월

세부 추진계획

❍ 재난안전대책본부 구성 및 매뉴얼 정비	: 2020. 1월 ~ 2월

❍ 지진대책 추진(내진보강, 캠페인, 훈련 등)	: 2020. 1월 ~ 12월

❍ 전년도 재난관리실태 공시	: 2020. 2월

❍ 여름철 사전대비 추진(T/F팀 구성, 예방대책 추진 등)	: 2020. 3월 ~ 4월

❍ 해빙기 급경사지 안전점검 실시	: 2020. 3월 ~ 4월

❍ 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 등 재해예방사업 추진	: 2020. 3월 ~ 12월

❍ 재해 예·경보시설(128대) 점검 및 유지보수	: 2020. 4월 ~ 12월

❍ 폭염 종합대책 수립(T/F팀 구성, 예방대책 등)	: 2020. 5월

❍ 겨울철 사전대비 추진(T/F팀 구성, 예방대책 등)	: 2020. 10월 ~ 11월

기대효과

❍ 자연재난 피해경감 추진으로 인명·재산 피해 최소화 기여

1

110

급경사지 붕괴위험지역 정비사업

복구지원담당 ☏ 5202

일반계속사업

❍ 해빙기, 하절기 강우 시 낙석발생으로 주민 및 통행차량의 사고위험

❍ 급경사지 붕괴위험지역을 정비로 주민통행 안전 도모

사업개요

❍ 위    치 : 마천면 덕전리, 서상면 상남리, 함양읍 죽림리 일원

❍ 사 업 량 : 급경사지 사면정비 3개소(덕전4지구, 상남24지구, 오봉산지구)

❍ 사 업 비 : 2,400백만원(국비 1,200, 도비 360, 군비 840)

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월.

❍ 사업비 투자계획

(단위:백만원)

사업명	위 치	사업량	사업비				비고
			계	국비	도비	군비
급경사지 붕괴위험지역정비(3지구)	마천면 덕전리 외 2개소	사면정비 3개소	2,400	1,200	360	840	개소당 800

추진계획

❍ 실시설계 완료	: 2019. 12월

❍ 분할측량, 보상 및 인·허가 협의 완료	: 2020. 3월

❍ 사업착공	: 2020. 3월

❍ 사업준공	: 2020. 12월

기대효과

❍ 사면붕괴 및 낙석발생 위험 해소

❍ 주민과 통행차량의 안전 확보

1

1200

태관천 재해위험지구 정비사업

복구지원담당 ☏ 5202

일반계속사업

❍ 재해위험지구 정비 사업을 통해 태관천 주변 상습침수구역 개선
재해예방과 민원해소, 주거환경개선 도모

사업개요

❍ 위    치 : 휴천면 대천리 401번지 ~ 태관리 일원(지방하천:태관천)

❍ 사 업 량 : 제방축제 및 호안공사 L=2.1㎞, 교량10개소 등

❍ 사 업 비 : 7,241백만원(국비 3,621, 도비 1,086, 군비 2,534)

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월(3년간)

❍ 연차별 투자계획

(금액 : 백만원)

구분	계		기 투자		2020년		2021년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	ㆍ제방 L=2.1㎞ ․교량9개소 등	7,241	․기본 및 실시설계 1식 ․보상 등	2,221	ㆍ제방 L=2.1㎞ ․교량10개소 등	1,720	ㆍ제방 L=2.1㎞ ․교량10개소 등	3,300
국비		3,621		1,040		860		1,721
도비		1,086		312		258		516
군비		2,534		869		602		1,063

추진계획

❍ 하천기본계획 변경 및 실시설계 완료	: 2019. 3월 ~ 10월

❍ 토지보상 시행	: 2020. 1월 ~ 6월

❍ 사업착공	: 2020. 3월

❍ 사업준공(예정)	: 2021. 12월

기대효과

❍ 자연재해 우려지구를 정비하여 재해예방과 주민 재산보호 기여

1

13

도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역

도시계획담당 ☏ 5203

일반계속사업

❍ 국토교통부 표준시스템(8.0) 자료현행화 및 도시계획전산장비 운영

❍ 행정업무와 대민서비스 지원으로 능률성 및 신뢰성 향상

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 40백만원

❍ 사업내용

(단위 : 백만원)

구 분	사업내용	사업비	비 고
계		40
국토교통부 표준시스템(8.0) D/B 현행화 용역	국토부 표준시스템 D/B 현행화 및 시스템 업데이트	22	▪ 국토부 시스템 자료입력 조치 - 도형 및 속성자료 현행화 구축 - 대국민 자료제공 기여
도시계획 전산장비(UPIS) 운영 및 유지관리 용역	전산실내 도시계획장비 H/W 및 S/W 유지보수	18	▪ UPIS 운영장비 유지관리 - 소프트웨어, 개발프로그램 유지보수 - 하드웨어 점검 및 장애시 긴급복구

추진실적 및 계획

❍ UPIS 시스템 도입 및 D/B 구축 완료	: 2013. 1월 ~ 11월

❍ 2020 유지관리 용역 실시	: 2020. 1월

❍ 정기 및 수시점검	: 2020. 1월 ~ 12월

❍ 용역 준공	: 2020. 12월

기대효과

❍ 국토계획법 제128조(국토이용정보체계의 활용) 규정에 따라 국토      이용정보체계 구축 및 운영을 통한 도시계획시스템 유지관리

❍ 최신 데이터베이스 현행화로 행정신뢰 구축 및 신속한 민원처리

1

14

자전거 둘레길 기반 조성 사업

도시계획담당 ☏ 5203

일반계속사업

❍ 지리산과 덕유산의 수려한 자연경관을 활용한 관광레저 기반 확충

❍ 자전거 둘레길 조성으로 관광소득 증대

사업개요

❍ 사 업 명 : 함양군 자전거 둘레길 조성사업

❍ 위    치 : 함양군 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

❍ 사 업 량 : L=132㎞ 둘레길 도로노선 도색 및 안내표지판 설치

❍ 사 업 비 : 200백만원(자체사업)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019년	2020년	비 고
군 비	200	20	180

추진실적 및 계획

❍ 자전거 동호회 간담회 3회 : 2019. 1월 ~ 3월

❍ 현장조사 및 구간결정(인근 시ㆍ군과 자전거 도로망 연결 구간 포함) : 2019. 10월

❍ 둘레길 노선, 노면표시 및 표지판 위치 확정에 따른 업무 협의 : 2019. 11월

❍ 사업 발주 : 2020. 3월

❍ 사업 준공 : 2020. 6월

기대효과

❍ 대표 관광지를 경유하는 코스선정으로 볼거리와 먹거리의 연계를 통한 지역 내 타 산업의 동반 성장

❍ 인근 시ㆍ군과 자전거도로 연계로 친환경 자전거 문화 확산

1

15

군계획시설도로 개설공사

도시개발담당 ☏ 5204

일반계속사업

❍ 주민불편이 가중되는 장기미집행 군계획도로를 개설

❍ 도시기반시설 확충으로 안전하고 편리한 도시 조성

사업개요

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	위 치	사 업 내 용	사업비	비 고
계	3건			4,400
도로 개설 사업	중·고등학교 주변(중로2-1호선) 도로환경 정비사업	함양읍 교산리 (함양중학교교차로~박씨제각)	L=495m, B=11~18m (회전교차로 1식)	3,000	보상비
	금천 군계획시설도로 (소로2-5, 34호선) 개설공사	안의면 금천리 (안의버스터미널~ 문화장)	L=240m, B=8m	1,200	공사비
	봉강 군계획시설도로 (소로2-14호선) 개설공사	함양읍 교산리 (동양원텔~상림캐슬)	L=220m, B=8m	200	공사비 (도비보조)

추진실적 및 계획

❍ 금천 군계획시설도로(소로2-5, 34호선) 개설공사

- 보상완료 : 2019. 12월

- 사업 착공 및 준공 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

❍ 중ㆍ고등학교 주변(중로2-1호선) 도로환경 정비사업

- 감정평가 및 지적측량 실시 : 2020. 1월

- 보상협의 : 2020. 2월

❍ 봉강 군계획시설도로(소로2-42호선) 개설공사

- 감정평가 및 지적측량 실시 : 2019. 10월

- 보상협의 : 2019. 11월

기대효과

❍ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충과 주민생활 불편해소

❍ 위급 시 소방차, 긴급자동차의 원활한 진입으로 군민의 생명과 재산보호

1

16

군계획시설물 유지관리 사업

도시개발담당 ☏ 5204

일반계속사업

❍ 군계획시설물의 노후와 파손으로 통행에 위험사례 등 수시발생

❍ 도시 기반시설을 정비하여 안전하고 편리한 주거환경 조성

군계획시설(도로)현황

❍ 도시지역(함양, 안의, 서상) : 3개소, 913,498㎡

❍ 제2종지구(마천, 휴천, 수동, 서하) : 4개소, 55,358㎡

추진방향

❍ 노후시설을 수시로 보수하여 안전사고 예방 및 시기적절한 응급조치

❍ 군계획시설물을 정비하여 안전하고 편리한 주거환경 조성

❍ 사업내용

- 사업대상 : 군계획도로 및 도시지역 외 지구단위계획구역, 군계획시설물

- 정비내용 : 인도 및 표지판정비, 차선도색, 미지급용지 보상 등

- 사 업 비 : 396백만원

추진계획

❍ 군계획시설물 상시 유지·관리

- 보도블럭, 차선도색, 볼라드 정비, 소파 보수 등 수시 시행

- 엑스포 개최에 따른 상반기 집중 정비

기대효과

❍ 주민불편 해소 및 각종 안전사고 예방

❍ 편리한 보행환경 조성으로 군민에게 신뢰받는 행정 구현

1

17

소규모 재생사업(인당마을)

도시재생담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 함양산삼청국장 사업화를 위한 지역주민 공동체 육성 및 마을공유화를
위한 스타트업 사업 추진

사업개요

❍ 사 업 명 : 인당산삼청국장 마을공유화를 위한 스타트업

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년(2년)

❍ 사업위치 : 함양읍 이은리 315번지 일원

❍ 사업규모 : A=52,607㎡

❍ 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 도비 40, 군비 160)

❍ 사업내용

- 공동텃밭 내 백태 시범재배를 통해 산삼청국장 상품 및 브랜드 개발

- 인당산삼청국장 마을기업(협동조합) 설립 및 운영

추진실적 및 계획

❍ 인당 더 건강한 브랜드 개발 컨설팅, 기술교육 및 상품개발	: 2019. 11월

❍ 마을관리협동조합 컨설팅 및 관리운영	: 2020. 1월

❍ 공동텃밭 조성, 공동작업장 리모델링	: 2020. 4월

❍ 산삼청국장 홍보 컨설팅 및 자료제작·배부	: 2020. 5월

❍ 공동작업장 물품구입 및 활용	: 2020. 7월

❍ 산삼청국장 홍보 컨설팅 및 제조·가공	: 2020. 9월

기대효과

❍ 주민역량 강화 및 주민공동체 활성화

❍ 지역 내 마을기업 창업 및 육성으로 자생적 마을운영 시스템 구축