상 하 수 도 사 업 소

Ⅰ. 기본현황	551

Ⅱ. 2020 주요성과	556

Ⅲ. 2021 업무추진 방향	557

Ⅳ. 2021 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 소규모급수시설 기반설치 지원사업	559

□ 수동지구 농어촌 생활용수 개발사업	560

□ 신천지구 하수관로 설치사업	561

□ 안의면 공공하수처리시설 확충사업	562

□ 대포·손곡지구 면단위공공하수처리시설 설치	563

2. 역점(특수)시책

□ 상하수도 요금체계(누진제) 단일화 추진	564

□ 지방상수도 수도계량기 이설 추진	565

3. 일반계속사업

□ 광역마을상수도(유림지구) 설치사업	566

□ 병곡지구 지방상수도 확충사업	567

□ 지곡지구 지방상수도 확충사업	568

□ 지방상수도 현대화사업	569

□ 삼정지구 하수도시설 설치사업	570

□ 농월정 하수도시설 설치사업	571

□ 성북·황대 하수도시설 설치사업	572

□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영	573

□ 공공하수시설 운영 및 정비사업	574

함양군 정수장 운영 관리	575

Ⅰ		기본현황

정․현원

구 분	계	상하수도 사업소장	관리 담당	상수도 담 당	하수도 담 당	정수장 담 당	비고
정 원	17	1	5	4	4	3	▫취ㆍ정수장 -계 : 15명 -청경: 3명 -공무:12명
현 원	16	1	5	4	3	3

기   능

구 분	분 장 사 무
관리담당	❍ 일반회계, 상하수도 특별회계 예산편성 및 집행 ❍ 일반서무, 공유재산 관리 ❍ 마을상수도 및 소규모수도시설 정비사업 정비 ❍ 광역마을상수도 사업 시행 ❍ 마을상수도 및 소규모수도시설 조례 관리 ❍ 지하수 개발 및 관리
상수도담당	❍ 상수도 기본 및 정비계획 수립 시행 ❍ 상수도 현대화 구축사업 ❍ 상수도 급수구역 확대, 급수공사 ❍ 상하수도 사용료 부과 징수 ❍ 상하수도 검침, 체납관리 ❍ 노후관 개량, 계량기 교체, 누수방지 사업 ❍ 상수도 관련 조례 관리 ❍ 상수도 민원 처리
하수도담당	❍ 하수도정비기본계획 수립 및 시행 ❍ 하수도시설 확충사업 및 유지관리 ❍ BTL사업 운영 관리 ❍ 하수처리장 설치, 운영 관리 ❍ 하수도 관련 조례 관리 ❍ 배수시설 설치신고 및 관리
정수장담당	❍ 먹는 물 수질관리 ❍ 취ㆍ정수장 설치 운영관리 ❍ 수돗물수질평가위원회 운영관리 ❍ 저수조 및 상수원보호구역 관리 ❍ 약수터, 먹는물 공동시설 관리

지방상수도 현황

정수장	시설 년도	시설용량 (톤/일)	계획급수 인 구	현재급수 인 구	급수 전수	급수구역	근무 인력
계		14,700	29,445	26,454	9,111
함양	1980 (2010)	9,000	21,945	20,284	5,880	함양읍(12개리, 40개 마을) 운림리, 용평리, 대덕리, 교산리, 신천리, 신관리, 백천리, 백연리, 이은리, 난평리, 삼산리, 죽곡리 수동면(3개리, 8개 마을) 화산리, 우명리, 원평리 지곡면(6개 리, 11개 마을) 개평리, 평촌리, 공배리, 보산리,시목리, 마산리	공무원 3 청경 3 공무 5
안의	1985 (2005)	2,000	-	-	-	-	공무 1
서상	2015	3,700	7,500	6,170	3,230	서상·서하·안의면 일원 (3개 면, 50개 마을)	공무 6

※ 보급률(66%), 유수율(74%), 생산원가(2,140원), 판매단가(724원), 현실화율(34%)

상수원보호구역 현황

보호구역명	지정일자 (변경일자)	지정면적 (㎢)	위치	수원	취수능력 (㎡/일)	비고
계	2개소	0.41㎢	-	-	11,000
함양상수도	1982. 1. 21.	0.28㎢	취수장 ~ 덕평교 하부 하천구역	위천	9,000
안의상수도	1986. 5. 9. (2005. 3. 3.)	0.13㎢	취수장~마음마을 하부 하천구역	지우천	2,000

약수터 현황

시 설 명	위 치	비 고
상림 약수터	함양읍 운림리 49
백운산 약수터	백전면 백운리 산 91-14

지하수 현황

(단위 : 공)

읍면 구분	관리공수	허가	신고	경미시설	비 고
합 계	9,226	65	9,161	-
함 양	1,724	9	1,715	-
마 천	301	4	297	-
휴 천	473	9	464	-
유 림	448	5	443	-
수 동	1,620	3	1,617	-
지 곡	2,123	3	2,120	-
안 의	1,113	4	1,109	-
서 하	435	8	427	-
서 상	410	10	400	-
백 전	354	9	345	-
병 곡	225	1	224	-

마을상수도 및 소규모 급수시설 현황

구분 읍면	시설수 (개소)	마을상수도			소규모급수시설			비고
		소계	지하수	계곡수	소계	지하수	계곡수
계	238	113	111	2	125	117	8
함양	16	8	8	-	8	7	1
마천	35	19	17	2	16	12	4
휴천	31	7	7	-	24	24	-
유림	24	18	18	-	5	5	-
수동	19	9	9	-	10	10	-
지곡	22	9	9	-	13	13	-
안의	26	10	10	-	16	14	2
서하	12	5	6	-	7	7	-
서상	11	7	7	-	4	4	-
백전	24	11	11	-	13	13	-
병곡	18	9	9	-	9	8	1

※ 마을상수도 : 급수인구 2,500명 이내, 급수량 500㎥/일 미만
소규모급수시설 : 급수인구 100명 미만, 급수량 20㎥/일 미만

하수처리시설 현황

마을현황	하수처리		향후계획		계획유보마을
	시설수	마을수	시설수	마을수
264	54개소	140	4개소	34	90

※ 계획유보마을 : 하수처리인구수가 적고 가구가 산재되어 있어 현재 함양군 하수도기본계획에
미반영(2025년 이후 하수도기본계획 변경 시 반영여부 결정)

500톤/일 이상

시 설 명	위 치	시설용량 (㎥/일)	설계유입수질 BOD(ppm)	처리구역 (마을)
계	3개소	11,300		45
함양하수처리시설	함양읍 용평리 27	9,600	184	26
수동하수처리시설	수동면 화산리 1162-5	800	158	8
안의하수처리시설	안의면 이전리 312	900	185	11

500톤/일 미만

시설수 (마을수)	시설용량 (㎥/일)	읍면	시설수	처리마을
51개소 (94개 마을)	3,951	함양읍	8개소	신기, 대병, 척지, 본백·중촌, 관동, 죽곡, 뇌산, 구만·조동·원구
		마천면	6개소	강청·실덕·도촌·뇌전, 가흥이주단지, 의평·의중·금계, 창원, 당흥, 추성
		휴천면	4개소	한남, 원기, 동호, 목현·금반
		유림면	3개소	장항, 서주이주단지, 우동
		수동면	4개소	분덕, 분덕이주단지, 도북, 효리·가성·남계
		지곡면	6개소	시목, 공배, 정취, 문화·개평·상개평, 창촌, 전원마을(보산), 덕암·오평
		안의면	3개소	하비·내동·마음·사평·유동, 농월정, 동촌·안심
		서하면	3개소	은행, 오현, 송계·신기
		서상면	7개소	방지, 추하·추상, 옥산, 복동, 육십령, 조산·신기·식송, 칠형정·도천·피적래·오산·맹동·대로
		백전면	2개소	평촌·동백·서백, 대평·하백현·양천·음천
		병곡면	5개소	신기, 연서, 마평, 토내·덕평·송평·가촌· 휴촌, 도천·월암,원산

Ⅱ		2020 주요성과

안정적인 수돗물 공급을 위한 기반조성 및 유지관리

❍ 지방상수도 확장사업 및 노후관망 정비사업 : 7건, 11,833백만원

- 함양군 지방상수도 현대화사업(노후관로 교체 L=37㎞) : 6,610백만원

- 병곡지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=4.02㎞) : 1,974백만원

- 지곡지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=8.11㎞) : 1,879백만뭔

- 지방상수도 급수구역 확장사업(귀곡, 성북황대, 방정, 대광) : 1,370백만원

❍ 지방상수도 관로 개량 사업(지방상수도 누수복구) : 1건, 330백만원

❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 개보수 및 정비 : 194건, 3,517백만원

- 소규모 급수시설 노후화 시설 개량 사업 : 931백만원

- 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 및 개보수 : 2,586백만원

안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급 추진

❍ 원·정수 수질검사 : 155백만원

- 지방상수도 : 36백만원, 소규모 수도시설 : 119백만원

❍ 배수지 청소 : 2회, 54백만원

❍ 지방상수도 시설개선사업 : 420백만원

깨끗한 수질관리를 위한 하수처리시설 구역 확대 및 유지관리

❍ 하수처리구역 확장사업 : 9,525백만원

- 삼정지구 하수도시설 설치사업(하수처리시설100㎥/일, L=3.1㎞) : 4,478백만원

- 농월정 하수도시설 설치사업(관로매설 L=7.563㎞) : 3,211백만원

- 성북황대 하수도시설 설치사업(관로매설 L=2.8㎞) : 1,836백만원

❍ 하수관로정비 임대형 민자사업(btl) 운영 관리 : 60,092백만원

❍ 노후 공공하수처리시설 유지관리 및 보수 : 195백만원

공공하수처리 시설 운영 및 관리

❍ 공공하수도 시설 운영 및 유지관리 : 3,647백만원

❍ 소규모처리장(백무동 외 12개소) 기술진단 : 137백만원

❍ 공공하수처리시설 통합관리시스템 유지보수 : 62백만원

Ⅲ		2021 업무추진 방향

산삼의 고장, 불로장생 엑스포 도시 함양

	전략목표
맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성
	단위사업
마을상수도 통합관리 시스템 구축으로 생활용수의 안정적 공급 지방상수도 급수구역 확대로 안정적인 맑은 물 공급 지방상수도 현대화사업 추진 하수처리시설 확대 추진 하수관로 정비 BTL사업 운영, 관리

1

1

소규모급수시설 기반설치 지원사업

관리담당 ☏ 6610

신규사업

❍ 수량부족 또는 수질불량으로 물 공급이 어려운 마을 및 인접지역에 상수도기반시설을 지원하여 음용수 문제 해결

개    요

❍ 대 상 지 : 함양(신기), 마천(등구), 휴천(진관), 안의(마음), 서하(거기), 서상(장구지), 백전(상백현)

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 10월

❍ 사 업 량 : 기반시설 지원 7개소(대체관정 개발, 관로설치 등)

❍ 사 업 비 : 560백만원

추진계획

❍ 사업계획 및 설계	: 2021. 1월

❍ 사업 발주	: 2021. 2월

❍ 사업 준공	: 2021. 6월

문 제 점

❍ 독가촌 및 수질불량지역에 음용수 등 생활용수 확보 어려움

❍ 상수도 미보급지역의 마을상수도(소규모급수시설) 설치 요구는 많으나 막대한 예산이 소요됨으로 인해 대상지는 한정적임

기대효과

❍ 수질불량 및 수량부족으로 인한 음용수 공급 문제 해결

❍ 귀농·귀촌 인구유입 유도 효과와 더불어 주민들의 삶의 질 향상

1

2

수동지구 농어촌 생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 6620

신규사업

❍ 수질악화 및 수량부족으로 어려움을 겪고 있는 지역에 맑고 깨끗한
지방상수도를 안정적으로 공급하여 주민불편 해소

개    요

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2022. 12월(2년간)

❍ 위    치 : 수동면 화산리 ~ 죽산리 일원

❍ 총사업비 : 4,556백만원(전환70%, 지방비30%)

❍ 사업규모 : 관로 L=18.3km, 가압장 2개소, 유량계실 1개소

❍ 급수구역 : 8개마을(220가구,395명)

(부생, 분덕, 도장, 죽전, 외산, 내산, 교항, 치라골)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022년
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=18.3km 가압장 2개소, 유량계실1개소	4,556	실시설계 1식	144	관로 L=7.0km	1,143	관로 L=11.3㎞가압장 2개소, 유량계실1개소	3,269
균특전환		3,189		-		800		2,389
도 비		611				171		440
군 비		756		144		172		440

추진상황 및 계획

❍ 실시설계 완료	: 2019. 8월

❍ 공사 착공 및 준공	: 2021. 2월 ~ 2022. 12월

문 제 점

❍ 우리군에서 2017년~2021년까지 4건 52,586백만원(국도비32,667백만원) 지방상수도 현대화사업 및 농어촌 생활용수 개발사업을 추진에 따른 2021년 균특전환사업(신규) 신청 예산의 절반을 확보

기대효과

❍ 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 생활환경의 개선 및 지역의 균형적인 발전 도모

1

3

신천지구 하수관로 설치사업

하수도담당 ☏ 6630

신규사업

❍ 함양읍 시가지 인근 하수미처리구역으로 BTL사업 배제됨에 따라
최근 주민들의 하수도사업에 대한 관심 급증

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업(신규)

❍ 위    치 : 함양읍 신천리(삼천, 후동, 평촌, 기동)

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월 (3년간)

❍ 사 업 량 : 하수관거 7.6km, 중계펌프 2개소, 배수설비 228개소

❍ 수 혜 도 : 4개 마을 496명(처리구역 10.81ha)

❍ 사 업 비 : 6,514백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로7.6km 중계펌프 2개소 배수설비 228개소	6,514	실시설계 1식	50	관로2.0km	714	관로 5.6km 중계펌프 2개소 배수설비 228개소	5,750
국 비		4,560		0		500		4,060
도 비		0		0
군 비		782		50		214		518
기 금		1,172		0				1,172

추진계획

❍ 실시설계 완료	: 2018. 7월 ~ 2019. 12월

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020. 2월 ~ 9월

❍ 환경부 사업 확정 및 가내시 통보	: 2020. 11월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2020. 12월 ~ 2021. 1월

❍ 공사착공 및 준공	: 2021. 1월 ~ 2023. 12월

기대효과

❍ 지역민의 주민숙원사업으로 마을의 공중위생 향상 및 정화조 준설의
번거로움에서 벗어나 쾌적한 주거환경 조성

1

4

안의면 공공하수처리시설 확충(증설)사업

하수도담당 ☏ 6630

신규사업

❍ 처리구역 확장으로 안의 공공하수처리시설의 계획 하수량이 증가됨에
따라 하수처리시설 용량 증설사업을 통해 안정적인 하수처리체계 확립

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업(신규)

❍ 위    치 : 안의면 이전리 안의공공하수처리시설
안의면 황곡리(이문, 신당), 수동면 상백리(상백, 내백, 금호)

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월(3년간)

❍ 사 업 량 : 안의처리장 시설 300㎥/일 증설, 하수관거 8.5km
(기존 900㎥/일, 최종 1,200㎥/일), 배수설비 363개소

❍ 수 혜 도 : 112.8ha(기존 : 74.2ha, 확대 : 38.6ha)

❍ 사 업 비 : 12,579백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 증설 300㎥/일, 하수관거 8.5km	12,579	실시설계 1식	300	실시설계 처리장 증설 300㎥/일	715	처리장 증설 300㎥/일 하수관거 8.5km 배수설비 363개소	11,564
국 비		8,805		-		500		8,305
도 비		755		-		107.5		647.5
군 비		755		300		107.5		347.5
기 금		2,264		-				2,264

추진계획

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020. 2월 ~ 9월

❍ 환경부 사업 확정 및 가내시 통보	: 2020. 11월

❍ 실시설계용역 추진	: 2020. 12월 ~ 2021. 6월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2021. 6월 ~ 8월

❍ 공사착공 및 준공	: 2021. 9월 ~ 2023. 12월

기대효과

❍ 안의면의 하수처리구역 확장에 따라 공공수역의 수질향상으로 지역
사회의 공중위생 향상에 기여하여 쾌적한 주거환경 조성

1

5

대포ㆍ손곡지구 면단위공공하수처리시설 설치

하수도담당 ☏ 6630

신규사업

❍ 마을단위 하수도시설 정비로 남강댐 상류지역 물 자원의 효율적
운용관리를 통한 공공수역 수질 및 정주여건 개선

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업(신규)

❍ 위    치 : 휴천면 대천리, 유림면 유평ㆍ서주ㆍ손곡리 일원
(대포, 미천, 판문, 화암, 옥산, 유평, 회동, 지곡, 손곡)

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월(3년간)

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 80㎥/일, 하수관거 8.8km, 배수설비 232개소

❍ 수 혜 도 : 232가구 377명(처리구역 16.8ha)

❍ 사 업 비 : 9,595백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전(기투자)		2021 계획		2021 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 80㎥/일 관로 8.8km	9,595	실시설계	-	실시설계 처리장 80㎥/일	429	처리장 80㎥/일 관로 8.8km 배수설비 232개소	9,166
국 비		6,716		-		300		6,416
도 비		576		-		64.5		511.5
군 비		576		-		64.5		511.5
기 금		1,727		-				1,727

추진상황 및 계획

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020. 2월 ~ 9월

❍ 환경부 사업 확정 및 가내시 통보	: 2020. 11월

❍ 실시설계용역 추진	: 2020. 11월 ~ 2021. 6월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2020. 12월 ~ 2021. 6월

❍ 공사착공 및 준공	: 2021. 9월 ~ 2023. 12월

기대효과

❍ 공공수역의 수질개선으로 취수원을 보호하고 생활 필수기반시설인
하수도 정비로 지역주민 삶의 질 향상

1

1

상하수도 요금체계(누진제) 단일화 추진

상수도담당 ☏ 6620

특수시책

❍ 상하수도요금 계산을 용이하게 하고, 다자녀가정, 대가족 등 다인

가구에 공평하게 요금을 부과하고자 수도요금체계를 단일화하고자 함.

추진배경

❍ 상수도요금 및 하수도사용료에 대해 10톤 단위, 6단계 누진제로 요금체계가 지나치게 세분화되어 상하수도요금 계산이 어렵고 이해하기 어려워 요금체계를 개편(누진제 폐지)하고자 함.

❍ 다자녀, 대가족 등 다인가구는 물사용량 자체가 많아 상대적 불이익 발생

❍ 요금계산을 간이하게 하고, 다인가구에 불공평한 요금체계를 해소하고자 수도요금체계 단일화를 추진하고자 함.

추진계획

❍ 상하수도 요금체계개편 연구 용역 시행         : 2021. 1월

❍ 「함양군 수도급수 조례」 개정 추진

- 입법계획 및 물가대책심의                   : 2021. 7월

- 입법예고(의회간담회) 및 성별영향분석평가    : 2021. 8월

- 규제개혁심사 및 법제심사의뢰               : 2021. 9월

- 조례규칙심의회 및 공포                     : 2021. 11월

기대효과

❍ 공동주택 등의 요금 계산이 용이하고, 군민들의 요금에 대한
이해도 제고.

❍ 이사 등으로 수시요금 부과 시 계산이 쉬워 민원 안내 간소화

❍ 수도요금에 대한 다자녀가구, 다인가구의 상대적 불이익 해소

1

2

지방상수도 수도계량기 이설 추진

상수도담당 ☏ 6620

특수시책

❍ 계량기함 이설 공사로 앞서가는 상수도 행정 구현

❍ 옥외 검침 환경 조성으로 개인 사생활 보호 및 검침 업무 애로 해소

개    요

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 6월

❍ 위    치 : 함양군 일원

❍ 사 업 비 : 69백만원(군비 100%)

❍ 사업규모 : 40개소

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기시공 (현대화사업)	2021 계획	2022 이후	비고
사업량(건)	1,470	470 (455)	40	960
사업비(백만원)	2,205	705	69	1,431

추진계획

❍ 읍면 신청접수 및 수요조사	: 2020. 9월

❍ 2021년 사업비 당초예산 편성 요구	: 2020. 10월

❍ 기본·실시설계 실시	: 2021. 2월

❍ 사업추진 및 준공, 사업수요 분석	: 2021. 12월

기대효과

❍ 기존의 옥외자동검침기를 대체하여 수도행정 불신 해소

❍ 옥외자동검침기 유지관리비 절감(20백만원) 및 앞서가는 상수도 행정 구현

❍ 옥외검침 환경 조성으로 개인 사생활 보호

1

1

광역마을상수도(유림지구) 설치사업

관리담당 ☏ 6610

일반계속사업

❍ 노후된 소규모 수도시설을 통합하여 광역마을상수도 설치

❍ 맑고 깨끗한 생활용수의 안정적 공급으로 군민 삶의 질 향상

개    요

❍ 위    치 : 유림면, 휴천면 일원

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5년간)

❍ 사 업 량

- 정수시설 470㎥/일, 취수시설 500㎥/일, 배수시설 V=300㎥,
송수관로 L=4.12Km, 배수관로 L=18.61km, 급수관로 L=12.09km

❍ 급수혜택

- 15개마을, 531가구(1,180명)
(지곡, 손곡, 서주, 우동, 화촌, 장항, 회동, 유평, 옥산, 화암, 창촌, 판문, 동호)

❍ 사 업 비 : 10,956백만원(전환 70%, 군비 30%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	취·정수 시설 1식, 관로 L=35.16km	10.956	취·정·배수장 토공 1식, 관로 L=28.56km	7,007	관로매설L=8.92km	3,949
전 환		7,669		4,700		2,969
도 비		636				636
군 비		2,651		2,307		344

추진계획

❍ 2단계 1차분 사업 준공	: 2021. 5월

❍ 2단계 2차분 사업 착공	: 2021. 2월

❍ 사업 준공	: 2021. 12월

기대효과

❍ 노후된 소규모 시설들을 통합관리 시스템을 구축하여 맑고 깨끗한
생활용수를 안정적으로 공급함으로서 군민 삶의 질 향상과 정주여건 제고

1

2

병곡지구 지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 6620

일반계속사업

❍ 마을상수도 공급지역인 병곡지구에 지방상수도 공급 확대를 통한 주민생활
불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

❍ 가뭄 등 비상사태 발생 시 안정적인 원수확보로 원활한 상수도 공급

개    요

❍ 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2021. 12월(5년간)

❍ 위    치 : 병곡면 송평리 530-6일원

❍ 총사업비 : 9,953백만원(전환 70%, 지방비30%)

❍ 사업규모 : 관로 L=28.8km, 배수지 1개소, 가압장 1개소

❍ 급수구역 : 11개 마을(443가구, 814명)
(송평, 가촌, 휴촌, 덕평, 토내, 소현, 신기, 월암, 상대평, 하대평, 하백현)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022년
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=28.8km 가압장 1개소, 배수지 1개소	9,953	관로 L=17.3km 가압장 4개소, 배수지 1개소	6,735	관로 L=11.5km	3,218
균특전환		6,967		4,700		2,267
도 비		486				486
군 비		2,500		2,035		465

추진상황 및 계획

❍ 실시설계 완료	: 2016. 8월

❍ 일반수도사업인가 완료	: 2017. 6월

❍ 총사업비 변경	: 2018. 1월

❍ 1단계사업 준공	: 2020. 12월

❍ 2단계사업 착공 및 준공	: 2020. 6월 ~ 2021. 12월

기대효과

❍ 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 생환환경의 개선 및 지역의 균형적인 발전 도모

1

3

지곡지구 지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 6620

일반계속사업

❍ 지방상수도 미공급지역인 지곡지구에 지방상수도 공급 확대를 통한
주민 보건위생 향상 및 더 큰 물 복지 실현

개    요

❍ 사업기간 : 2017. 9월 ~ 2021. 12월(5년간)

❍ 위    치 : 지곡면, 안의면, 수동면 일원

❍ 총사업비 : 9,641백만원(전환70% 지방비30%)

❍ 사업규모 : 관로 L=38.6km, 가압장 3개소

❍ 급수구역 : 15개 마을(604가구, 1052명)(오평, 마산, 수여, 봉곡, 중방,
시목, 창촌, 백일, 장자동, 거평, 상개평, 계곡, 금호, 상백, 내백)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=38.6km 가압장 3개소	9,641	관로 L=28.1km 가압장 2개소	6,886	관로 L=10.5km 가압장 1개소	2,755
균특전환		6,749		4,805		1,944
도 비		416				416
군 비		2,476		2,081		395

추진상황 및 계획

❍ 실시설계 완료	: 2016. 12월

❍ 일반수도사업인가 완료	: 2017. 9월

❍ 총사업비 변경	: 2018. 1월

❍ 1단계사업 준공	: 2020. 12월

❍ 2단계사업 착공 및 준공	: 2020. 6월 ~ 2021. 12월

기대효과

❍ 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 생환환경의 개선 및 지역의 균형적인 발전 도모

1

4

함양군 지방상수도 현대화사업

상수도담당 ☏ 6620

일반계속사업

❍ 유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적
공급으로 삶의 질 향상

개    요

❍ 위    치 : 함양읍, 안의면, 지곡면 일원

❍ 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2021. 12월(5년간)

❍ 사 업 량

- 노후상수관로 48km 정비, 관망 유지관리시스템 구축, 블록시스템
구축 11개소(함양 8, 안의 2, 서상 1)

❍ 사업목표 : 유수율 59%→85%이상 달성(유수율 90% 2020. 12. 31.기준)

❍ 사 업 비 : 22,032백만원(국비 50%, 지방비 50%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2018	2019	2020	2021	2022	비고
합 계	22,032	5,386	7,285	6,610	2,751	-
국 비	11,280	2,907	4,643	2,305	1,425	-
도 비	132	132	-	-	-	-
군 비	10,620	2,347	2,642	4,305	1,326	-

추진상황 및 계획

❍ 관로ㆍ시설물 전수조사, 관망도 전산화(GIS)	: 2017. 9월

❍ 블록시스템 구축 11개소 완료	: 2019. 6월

❍ 안의면 노후관망 정비공사 준공(12.4km)	: 2019. 12월

❍ 함양읍 노후관망 정비공사 준공(35.6km)	: 2021. 1월

❍ 블록 관망감시 및 유지관리시스템 구축	: 2021. 12월

기대효과

❍ 노후수도관 정비·개량을 통한 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로
공급함으로 주민 삶의 질 및 보건위생 향상

1

5

삼정지구 하수도시설 설치사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 지리산국립공원 인근 지역은 관광객 방문이 많고, 남강댐 상류로
수질개선이 시급하므로 생활하수를 완벽하게 처리하여 쾌적한
생활환경 조성

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 위    치 : 마천면 삼정리(음정, 양정, 하정)

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월(3년간)

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 100㎥/일, 하수관거 3.1km, 배수설비 154개소

❍ 수 혜 도 : 154가구(261명), 처리구역 11.9ha

❍ 사 업 비 : 4,478백만원(국비70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 100㎥/일 관로 3.1km	4,478	실시설계 관로 0.3km	178.5	처리장 100㎥/일 관로 1.0km	938.7	관로 2.1km 배수설비 154개소	3,360.8
국 비		3,135		0		627		2,508
도 비		269		0		53.7		215.3
군 비		269		178.5				90.5
기 타		805		0		258		547

추진상황 및 계획

❍ 실시설계 착수	: 2019. 3월

❍ 환경부 사업확정	: 2019. 11월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2021. 1월 ~ 2월

❍ 공사착공 및 준공	: 2021. 3월 ~ 2022. 12월

기대효과

❍ 주거 및 관광지의 수질개선과 수자원 보호로 공공수역의 수질
보전 및 쾌적한 주거환경 조성

1

6

농월정 하수도시설 설치사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 농월정 관광단지 및 화림동 계곡 등 지역 유원지 주변 수질개선      으로 지역 활성화 도모

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 위    치 : 안의면 월림리(방정, 고정, 월림)

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월(3년간)

❍ 사 업 량 : 하수관거 7.563km, 배수설비 74가구

❍ 수 혜 도 : 74가구(137명), 처리구역 3.1ha

❍ 사 업 비 : 3,211백만원(국비70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 7.563km	3,211	실시설계 1식, 관로 1.1km	596	관로 4.563km	223.8	관로 1.9km, 배수설비 74가구	2,391.2
국 비		2,237		315				1,922
도 비		192		65				127
군 비		207		106		100		1
기 타		575		110		123.8		341.2

추진상황 및 계획

❍ 실시설계 완료	: 2017. 2월

❍ 환경부 사업확정	: 2018. 11월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 2월 ~ 2020. 3월

❍ 공사착공 및 준공	: 2020. 4월 ~ 2022. 12월

기대효과

❍ 주거 및 관광지의 수질개선과 수자원 보호로 공공수역의 수질
보전 및 쾌적한 주거환경 조성

1

7

성북ㆍ황대 하수도시설 설치사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 하수도시설 확충으로 지역사회 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여

❍ 안의공공하수처리장에 유입, 연계 처리하여 운영비를 절감하고
하천 수질개선 및 수자원 보호

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 위    치 : 안의면 월림리(성북, 황대)

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월(4년간)

❍ 사 업 량 : 하수관거 2.8km, 배수설비 72가구

❍ 수 혜 도 : 72가구(155명), 처리구역 1.2ha

❍ 사 업 비 : 1,836백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	펌프장 2개소, 관로 2.4km	1,836	실시설계 1식, 관로 0.5km	1,525.4	펌프장 2개소, 관로 1.9km, 배수설비 72가구	179.8	배수설비 72가구	130.8
국 비		1,238		1,220		18
도 비
군 비		279		234.4		45.6
기 타		319		71		116.2		130.8

추진상황 및 계획

❍ 실시설계 완료	: 2019. 10월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2019. 2월 ~ 2020. 1월

❍ 공사착공 및 준공	: 2020. 2월 ~ 2021. 12월

기대효과

❍ 지역민의 주민숙원사업으로 마을의 공중위생 향상 및 정화조 준설의
번거로움에서 벗어나 쾌적한 주거환경 조성

1

8

하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)운영

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 2017년 BTL사업 완료 후 운영 관리체계로 전환함에 따라 하수

관로 유지관리 및 수질개선을 위한 BTL 임대료 및 운영비 지급

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 위    치 : 함양읍 일원

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2037년(20년간)

❍ 사 업 량 : BTL사업(관로정비 32.0km, 배수설비 3,191개소) 임대료 1식

❍ 총사업비 : 60,092백만원(국비 57%, 지방비 43%)

- 임대료 : 47,795백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

- 운영비 : 12,297백만원(군비100%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전 (기투자)		2021 계획		2022 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	임대료 운영비	60,092	임대료 운영비	8,558	임대료 운영비	2,899	임대료 운영비	48,635
국 비		33,457		5,070		1,673		26,714
도 비		-		-		-
군 비		18,032		2,276		861		14,895
기 타		8,603		1,212		365		7,026

추진상황 및 계획

❍ 사업시행자선정 및 실시협약체결 : 2014. 11월

❍ 재원협의 및 실시협약 변경 : 2017. 10월

❍ 위탁운영 및 운영성과 평가 : 2017. 9월 ~ 2037. 9월(20년)

- 하수관로정비 임대형민자사업 운영성과 평가 : 분기별(1ㆍ4ㆍ7ㆍ10월)

기대효과

❍ 함양군 하수처리구역 내 하수관로를 철저히 관리하여 수질개선
및 쾌적한 생활환경을 조성하고 지속적 모니터링 시스템 구축

1

9

공공하수시설 운영 및 정비사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 하수처리시설의 효율적 관리로 군민 보건 향상 및 수질환경 보호

❍ 지속적인 유지 관리로 생활하수의 안정적 처리체계 확립

개    요

❍ 대    상 : 54개소(공공하수도 3개소, 소규모하수처리 51개소)

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 4,992백만원(기금 20%, 군비 80%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020 이전 (기투자)	2021	2022	2023	비 고
계	27,831	9,571	4,992	6,634	6,634
기 금	5,885	1,933	1,020	1,466	1,466
군 비	21,946	7,638	3,972	5,168	5,168

추진계획

❍ 통합관리시스템 용역 시행	: 2021. 2월

❍ 상·하반기 안전 점검	: 2021. 4월, 10월

❍ 처리장 운영(위탁) 및 시설물 유지·보수	: 2021. 1월 ~ 12월

❍ 기술진단 결과에 따른 소규모처리시설 개선	: 2021. 1월 ~ 12월

❍ 공공하수처리시설 위탁에 대한 관리           : 2021. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 원활한 하수처리를 통한 깨끗한 수질관리로 환경보호 및 남강댐
상류지역의 수질보전에 기여

1

10 00

함양군 정수장 운영 관리

정수장담당 ☏ 6640

일반계속사업

❍ 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 정수장 시설의 유지 및 관리

❍ 수돗물의 생산 및 공급 과정을 실시간으로 감시하여 체계적인
품질관리로 수돗물의 신뢰성 향상 도모

개    요

❍ 위    치 : 함양정수장, 서상정수장

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 40개소(정수장 3, 가압장 24, 배수지 13)

❍ 사 업 비 : 1,057백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019	2020	2021	2022	2023	비고
군 비	5,116	888	1,057	1,057	1,057	1,057

추진상황

❍ 수돗물 생산 : 3,469천㎥/년(함양 2,325천㎥/년, 서상 1,144천㎥/년)

⇒ 2019년도 대비 누수 절감 : 464천㎥, 603백만원 절감

❍ 수돗물 수질검사

- 정수 : 주간 7개 항목 52회, 월간 59개 항목 12회

- 수도꼭지 : 일반 4개 항목 12회, 노후관 10개 항목 12회, 중점
관리지역 11개 항목 24회

❍ 시설물 유지관리

- 정수장 청소 : 3개소, 배수지 13개소(년 2회)

- 유량계 교정 : 19개소(년 1회)

추진계획

❍ 수돗물 생산(함양 6,400㎥/일, 서상 3,200㎥/일)	: 2021. 1월 ~ 12월

❍ 수돗물 수질검사(정수 64회, 수도꼭지 24회, 상수관망 24회)	: 2021. 1월 ~ 12월

❍ 정수장 3개소, 배수지 13개소 유지관리	: 2021. 4월, 10월

기대효과

❍ 정수장 시설점검 및 유지관리로 맑고 깨끗한 수돗물 안정적 공급