건 설 교 통 과

부서명	건설교통과	담 당	건설행정담당 조영화	담당자	유지연 (☏4158)

주민숙원사업 시행

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 시행으로 편익제공

❍ 생활주변 불량 시설물 정비로 안전사고 사전 예방

❍ 새마을 농로 편입부지에 대한 민원예방과 행정력 손실 방지

□ 사업개요

❍ 주민숙원 및 소규모 주민숙원사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 305개소(주민 참여 및 숙원사업 : 233, 소규모 주민숙원사업 : 72)

- 사 업 비 : 6,824백만원

- 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사업대상 : 새마을사업 농로 편입부지 이전등기

- 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 추진계획(2020. 1월 ~ 11월)

❍ 주민숙원사업 시행

- 실시설계 : 2020. 2월

- 사업착공 : 2020. 3월

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 분할 및 등기대상 필지 조사 : 2020. 2월

- 협의 취득 및 이전등기 : 2020. 2월 ~ 11월

□ 평가지표

성과지표(단위)	2019년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계					100
① 주민숙원사업 해결(%)	100%	(해결건수/건의건수)*100	40	결재공문 대조	40
② 국공유지 민원 해결(%)	100%	(해결건수/민원건수)*100	20	결재공문 대조	20
③ 새마을사업 편입부지 공부정리(%)	100%	(실적건수/계획건수)*100	20	결재공문 대조	20
④ 새마을사업 편입부지 등기(%)	100%	(실적건수/계획건수)*100	20	결재공문 대조	20

부서명	건설교통과	담 당	도로담당 염희생	담당자	오정훈(☏4296)

이은~난평간도로 확·포장공사

❍ 지방도 연장으로 도로를 이용하는 군민의 교통편익 제공 및

지역 접근성 제고

❍ 지방도 확·포장으로 원활한 통행성 확보로 편익 증진 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 이은리 남산 ~ 난평리 신기

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2022년

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.1km, B=9.5m, 교량 L=46m

❍ 사 업 비 : 18,000백만원(도비 85%, 군비 15%)(도비재배정사업)

- 2020년 확보목표액 : 1,500백만원

□ 추진계획(2020. 1월 ~ 11월)

❍ 편입토지 등 보상협의

❍ 문화재 정밀발굴조사

❍ 사업착공 7월

□ 평가지표

성과지표(단위)	2020년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 안전사고발생(건수)	0건	공사안전사고발생건수	10	산업재해 신고 건수
② 재정집행율(%)	70%	(‘20년 집행예산/ ‘20년 총사업비)*100	40	e호조 시스템 대조
③ 보상협의(%)	60%	(‘20년보상금액/ ‘20년보상목표액)*100	20	보상조서 대조
④ 국도비 예산확보액(%)	100%	(확보액/예산확보 목표액)*100	30	예산서 대조

부서명	건설교통과	담 당	하천담담 김병로	담당자	정수재 (☏4423)

자연친화적 하천관리 사업

❍ 아름다운 자연형 생태하천 복원과 재해로부터 군민의 재산 보호

❍ 치수, 친수, 생태복원 및 역사와 문화가 흐르는 고향의 강으로 하천조성

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2020년	2020이후
계			98,170	45,363	14,209	41,420
함양위천 생태하천 조성사업	함양읍 백연리 ~ 대덕리	o 하천정비L=4.7km o 교량재가설 2개소 o 가동보 1개소	41,556	32,741	8,815
덕전천 정비사업	마천면 가흥리 ~ 삼정리	o 하천정비L=6.0km o 교량 재가설 3개소 o 다목적저류지 1개소	38,502	1,800	1,000	35,702
소하천 정비사업	함양읍 외 4개면	o 소하천정비 L=7.76km	20,914	10,822	4,394	5,718	관동 미동 남산 학골 보각

※ 2020년 확보목표액 : 6,500백만원

□ 추진계획(2020. 1월 ~ 11월)

❍ 총사업비 협의 완료 : 2020. 3월(함양위천 실시설계 협의)

❍ 함양위천생태하천 하림지구 실시설계 완료 : 2020. 4월

❍ 사업착공(2건) : 2020. 4월

□ 평가지표

성과지표(단위)	2020년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
①4월까지 조기 착공율(%)	100%	(착공건수/사업건수)*100	25	착공현황
②연내 사업준공율(%)	100%	(준공건수/착공건수)*100	25	준공현황
③재정 조기집행률(%)	60%	(예산집행액/재정집행목표액)*100	25	e호조 시스템 대조
④국도비 예산확보액(억원)	70억원	예산확보액	25	관련 공문

부서명	건설교통과	담 당	농촌개발담당 권필현	담당자	김용대 (☏4174)

재해위험저수지 정비사업

❍ 저수지 붕괴 등으로 인한 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

□ 사업개요

❍  위    치 : 휴천면 호산리, 안의면 대대리, 지곡면 보산리 일원

❍  사업기간 : 2016년 ~ 2021년(6년간)

❍  사 업 량 : 재해위험저수지 정비사업 1식

❍  사 업 비 : 1,914백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

- 2020년 확보목표액 : 1,244백만원

□ 추진계획

❍ 대대웃못재해위험저수지 정비사업(3차분) 시행 : 2020. 1월

❍ 정취재해위험저수지 정비사업(2차분) 시행 : 2020. 1월

❍ 도장골재해위험저수지 정비사업(4차분) 시행 : 2020. 1월

❍ 도장골재해위험저수지 정비사업 준공 : 2020. 8월

❍ 거양, 송골재해위험저수지 정비사업 실시설계 용역 : 2020. 2월

□ 평가지표

성과지표(단위)	2020년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 3월까지 조기 착공율(%)	100%	(착공건수/사업건수)*100	25	온나라 참조
② 연내 사업준공율(%)	100%	(준공건수/사업건수)*100	25	온나라 참조
③ 재정 조기집행률(%)	60%	(집행액/목표액)*100	25	e호조 시스템 대조
④ 국도비 예산확보액(억원)	12억원	예산확보액	25	예산서 대조

부서명	건설교통과	담 당	교통담당 염재호	담당자	강동화 (☏4805)

한들 생태환경 주차장 조성사업

❍ 도로 환원 예정인 국도24호선 주차장을 대체하는 신규 공영주차장을 조성하여 부족한 주차 공간 확보하여 주차환경 개선 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 634-5번지 일원

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2020

❍ 사업내용 : 주차장(444면), 편의시설(관리 1동, 휴게공간 1동)

❍ 사업규모 : 주차장 설치 L=740m, B=42m(A=29,587㎡)

❍ 사 업 비 : 12,967백만원(균특 2,355, 도비 500, 군비 10,112)

□ 추진계획

❍ 군 계획시설사업 실시계획 인가 : 2020. 3월중

❍ 공사(토목, 건축 등) 착공 : 2020. 3월중

❍ 공영주차장 운영(유료화 등) 계획 수립 : 2020. 12월한

□ 평가지표

성과지표(단위)	2020년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 국도비 확보액(백만원)	1,855 백만원	목표 대비 확보 금액	40	예산서
② 예산집행률(%)	100%	(집행액/예산액)*100	20	e호조 시스템 대조
③ 엑스포 임시주차장 활용율(%)	100%	(임시주차장 활용면수/444면)*100	20	엑스포 종합교통계획 성과(평가)보고서
④ 공영주차장 운영계획 수립(건수)	1건	공영주차장 운영계획서(안) 수립 횟수	20	공문(업무보고)