개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양 신관.백천지구 투자유치 예정부지 조성사업(재심사)

(함양 항노화 산업단지 조성)

담당자

일자리경제과 김대철(☎960-4059)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군내에 공장 설립을 희망하는 기업을 위해 준비된 부지를 적기에 제공할 수 있도록 투자유치 예정부지를 사전 매입하여 기업유치 및 산업단지 조성

○ 기업유치를 통한 고용창출 및 주민소득증대와 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 함양군 함양읍 신관리 산 54-1번지 일원

○ 규 모

- 사 업 량 : 740,586㎡

- 총사업비 : 11,200백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,200	9,538	80	80	1,502
국 비
시 도 비
시군구비	11,200	9,538	80	80	1,502
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 2010.  5. : 편입부지 보상협의 추진(보상율 98%)

○ 2012. 11. : 개발행위 제한지역 지정 고시

○ 2018.  7. : 투자유치 활동 지속 추진

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물(분묘) 보상협의 지속 추진

○ 투자유치 활동 전개(투자유치설명회·박람회 참가 및 관련기관 방문 홍보)

□ 사업변경 내역

○ 사업명칭 변경 : 2016. 2. 1.

- 함양 제2일반산업단지 조성사업 → 함양 항노화 산업단지

(경상남도 항노화 산업 육성계획과 연계하여 추진코자 명칭 변경)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양 인산죽염 항노화 지역특화농공단지 조성사업

담당자

일자리경제과 김대철(☎960-4059)

□ 사업목적 및 필요성

○ 죽염의 최초 태생지인 지역 특성을 활용하여 경상남도 미래전략산업인 항노화 산업과 관련한 지역특화 농공단지를 조성함으로서 지역균형 발전을 도모

○ 선도적인 산업문화를 창조하는 웰빙관광 명소 조성을 위한 복합기능의 6차 산업화 지역특화 농공단지 조성으로 지역경제 활성화

○ 함양군 관내 흩어져 있는 주식회사 인산가의 각종 산업시설들을 농공단지에 집적화하여 비용 절감과 효율적인 생산활동 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.(4년간)

○ 위 치 : 경남 함양군 함양읍 죽림리 산319번지 일원

○ 규 모 : 조성면적 206,820㎡

(산업시설, 지원시설, 기반시설, 녹지 등 농공단지 조성사업 1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,505백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	26,505	300	7,900	6,700	11,605
국 비	4,379	-	-	-	4,379
시 도 비	313	-	-	-	313
시군구비	313	-	-	-	313
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	21,500	300	7,900	6,700	6,600
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상율 48%)

○ 2015. 11월   : 투자협약 체결[도-함양군-(주)인산가]

○ 2017.  5월   : 경상남도 지방산업단지계획심의위원회 심의 승인

○ 2017.  7월   : 함양 인산죽염 항노화 지역특화농공단지계획 승인고시

○ 2017. 11월   : 2017년 제4차 지방재정 중앙 투자사업 심사

○ 2018.  1월 ~ : 편입부지 감정평가 및 보상협의(보상율 : 48%)

□ 향후계획

○ 2018. 10월 : 공사착공

○ 2019. 12월 : 공사준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

한들 생태환경 주차장 조성사업

담당자

건설교통과 박춘성(☎960-4544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020 함양산삼항노화엑스포의 성공적인 개최를 위하여 부족한 주차시설을 확보하고

○ 기존 국도24호선 일부를 주차장으로 사용하고 있는 곳을 도로로 복구함은 물론이고 읍 소재지의 부족한 주차공간을 해결하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 2. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 함양군 함양읍 용평리 634-2번지 일원

○ 규 모

- 사업량 : A=29,590㎡(L=740m B=42m)

- 사업비 : 10,974백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,974백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,974	130	-	6,134	4,710
국 비	4,210	-	-	-	4,210
시 도 비	500	-	-	-	500
시군구비	6,264	130	-	6,134	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 34%)

○ 2017.  2. : 기본계획수립 및 타당성조사용역 실시

○ 2017. 12. : 실시설계 및 군 관리계획 결정용역 실시

○ 2018.  7. : 편입부지 보상협의 추진(보상율 34%)

□ 향후계획

○ 2018. 7. ~ 12. : 편입부지 보상협의 지속 추진

○ 2019. 1. ~ 12. : 사업 착공 및 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고운최치원선생 사당 조성사업

담당자

문화관광과 오정훈(☎960-4296)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최치원 선생의 애민정신과 사상을 기리고, 상림숲과 연계한

관광인프라를 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009년 ~ 2018년

○ 위 치 : 함양읍 교산리 1055번지 일원

○ 규 모 : 19,468㎡(기념관, 역사관, 상림관 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,998백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,998	7,798	536	2,664
국 비	1,450	1,450
시 도 비	1,435	1,435
시군구비	8,113	4,913	536	2,664
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 총괄 착공 : 2013. 12월

○ 전시관, 사료관 준공 : 2017. 7월

○ 내부시설 및 조경공사 등 사업 준공 : 2018. 5월

□ 향후계획

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농월정 국민관광지 정비

담당자

문화관광과 오정훈(☎960-4296)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자동차를 이용한 레저활동 증가 등 다양한 형태로 변화하는 관광추세에

대응하는 관광시설 정비

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위 치 : 안의면 월림리 724번지 일원

○ 규 모 : 138,110㎡(주차장, 휴게공원 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,000	4,300	254	1,046	2,400
국 비	4,000	2,150	127	523	1,200
시 도 비	1,200	645	38	157	360
시군구비	2,800	1,505	89	366	840
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 캠핑센터, 캐빈하우스 공사 착공 : 2013. 12월

○ 캠핑센터, 캐빈하우스 공사 준공 : 2016. 5월

○ 휴게공원 등 공사 착공 : 2017. 8월

○ 주차장, 도로 등 공사 준공 : 2017. 9월

□ 향후계획

○ 휴게공원 조성사업 준공 : 2018. 8월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양스포츠파크 조성사업

담당자

문화관광과 류순미(☎960-4167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건전한 여가활동을 위한 생활체육 인프라 구축

○ 전지훈련 유치와 대회 개최를 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 11. 14 ∼ 2020. 10. 23

○ 위 치 : 함양군 함양읍 백연리 610번지 일원

○ 규 모 : 210,516㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	14,500	4,000	3,000	2,500	5,000
국 비	5,800	1,580	1,200	1,000	2,020
시 도 비	150	150	-	-	-
시군구비	8,550	2,270	1,800	1,500	2,980
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 스포츠파크 1, 2차분 사업 완료

○ 스포츠파크 3차분 사업 착공

□ 향후계획

○ 미협의 토지 재감정 후 보상 및 수용재결 추진

○ 2020. 10월 사업 완료(1단계)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양문화원 건립

담당자

문화관광과 김양수(☎960-4747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역전통문화 계승·발전을 위한 전략적 거점을 확보하고 변화되는 트렌드에 적극 대응하여 군민의 문화적 욕구 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2019년

○ 위 치 : 함양읍 교산리 337번지 일원

○ 규 모 : 부지 2,688㎡, 건축 1,737.72㎡(지하1층~지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,616백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,616		170		4,446
국 비	1,846				1,846
시군구비	2,770		170		2,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016.  5월 : 지방재정 투자심사 승인

○ 2016.  7월 : 기본계획 및 실시설계 용역 발주

○ 2017.  4월 : 문체부 사전평가 심사(적정)

○ 2017.  4월 : 국비(1,531백만원) 확보

○ 2017.  9월 : 기본계획 및 실시설계 용역 완료

○ 2018.  3월 : 건축공사 착공

○ 2018.  4월 : 건축 허가 완료

□ 향후계획

○ 2019. 12월 : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제56회 함양물레방아골 축제

담당자

문화관광과 김양수(☎960-4747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양의 역사와 전통문화예술을 계승 및 발전

○ 상생·소통의 축제로 대군민 화합 도모

○ 농·특산물 마케팅 축제로 지역경제 활력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. 8. ~ 9. 17.

○ 위 치 : 함양 상림공원 일원

○ 내 용 : 공연·경연·체험·참여·전시 등 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,616백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	900	-	310	304	304
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	15	-	15	-	-
시군구비	870	-	290	290	290
기 타	15	-	5	5	5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  4월 : 제56회 함양물레방아골축제 기본계획 수립

○ 2017.  8월 : 준비상황 최종보고회 및 종합계획 수립

○ 2017.  9월 : 제56회 물레방아골축제 개최 및 평가보고회 실시

□ 향후계획

○ 2018. 9월 : 제57회 물레방아골축제 실시

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제56회 군민체육대회

담당자

문화관광과 임정훈(☎960-4976)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양군 체육진흥 및 군민 체력증진을 통한 건강

보호

○ 도민체육대회 출전 종목별 가맹단체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10. 21. ~ 22.(2일간)

○ 위 치 : 함양공설운동장 일원

○ 규 모 : 약 3,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   77백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	79	-	79
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	77	-	77	-	-
지 방 채	-	-	-
민간자본	2	-	2
기 타	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 11개 읍‧면 11종목(육상, 축구, 배구, 씨름, 게이트볼 등) 경기 추진

□ 향후계획

○ 함양군 체육진흥 및 군민 체력증진을 통한 건강 보호를 위해 향후
군민체육대회 계속 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

1. 교 부 액 : 금100,000,000원(금일억원)
2. 여 입 액 : 금 23,000,000원(금이천삼백만원)
3. 반납사유 : 세출예산 변경결정 추진

┌ 당 초 : (세부사업명) 제56회 군민체육대회

└ 변 경 : (세부사업명) 제28회 경남생활체육대축전 참가 지원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제56회 도민체육대회

담당자

문화관광과 임정훈(☎960-4976)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도민체육대회 실적 거양을 통한 자긍심 고취 및 함양군 위상 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 4. 28.(금) ~ 5. 1.(월), 4일간

○ 위 치 : 김해시 일원

○ 규 모 : 400명(임원, 선수, 기관단체)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :       208 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	208	-	208	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	8	-	8	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 군부 정식 27개 종목 중 우리군 18개 종목 참가

□ 향후계획

○ 우리군 위상 제고를 위하여 매년 도민체육대회 참가

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

죽림권역 종합정비사업

담당자

건설교통과 김동수(☎960-4061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양읍 죽림리 일원

○ 규 모 : 팔령치 교류센터, 마을회관 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,463백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,463	1,504	1,959
국 비	2,424	1,053	1,371
시 도 비	311	135	176
시군구비	728	316	412
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 기본계획 수립 : 2014년 10월

○ 시행계획 수립 : 2015년 10월

○ 사업 착공 : 2015년 10월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2018년 8월

□ 사업변경 내역

○ 당초  사업기간 : 2014~2017년

○ 변경  사업기간 : 2014~2018년, 토지협의지연 및 추진위원회 의견

수렴 지연

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

삼동권역 종합정비사업

담당자

건설교통과 임주섭(☎960-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 병곡면 옥계리 일원

○ 규 모 : 진입로정비, 다목적회관 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,599	2,211	1,387
국 비	2,519	1,548	971
시 도 비	324	199	125
시군구비	756	464	291
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 기본계획 수립 : 2014년 9월

○ 시행계획 수립 : 2015년 7월

○ 사업 착공 : 2015년 8월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2018년 12월

□ 사업변경 내역

○ 당초  사업기간 : 2014~2017년

○ 변경  사업기간 : 2014~2018년, 토지협의지연 및 추진위원회 의견

수렴 지연

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

휴천면소재지 종합정비사업

담당자

건설교통과 김동수(☎960-4061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 휴천면 목현리 일원

○ 규 모 : 다목적회관, 게이트볼장, 운동장시설개선, 아토피힐링산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,719백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,719	3,284	3,434
국 비	4,703	2,299	2,404
시 도 비	605	295	309
시군구비	1,411	690	721
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기본계획 수립 : 2014년 10월

○ 시행계획 수립 : 2015년  5월

○ 사업 착공 : 2015년 8월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2018년 12월

□ 사업변경 내역

○ 당초  사업기간 : 2014~2017년

○ 변경  사업기간 : 2014~2018년, 토지협의지연 및 추진위원회 의견

수렴 지연

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도천~구라(군도16호선) 우회도로 개설사업

담당자

건설교통과 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 병곡면 월암마을(100여가구)의 중심부를 통과하는 군도16호선의 노폭협소, 굴곡

으로 차량 시거 미확보로 인한 빈번한 교통사고 발생

○ 대봉산 자연 휴양림의 주 진입 도로로 향후 관광객 증가로 인한 대형버스 등

교통량 대폭 증가가 예상되어 우회도로 개설이 시급함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 3 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 함양군 병곡면 월암리

○ 규 모 : 우회도로개설 L=0.97km, B=9.0m, 교량 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,023백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,023	2,343	680	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	3,023	2,343	680	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 10 : 실시설계용역 시행

○ 2014. 10 : 도로구역 결정고시

○ 2014. 11 : 사업착공

○ 2018.  5 : 사업준공

□ 향후계획

○ 사업완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

대방~중기간 도로 확포장공사

담당자

건설교통과 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백전~임실 간 도로 확․포장사업이 일부 구간만 2004년 확장 후, 장기간 중단

된 상태로 동절기 폭설 및 결빙 시 교통 불편 초래

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 함양군 백전면 운산, 백운리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.9km, B=9.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,000	5,750	200	1,050	0
국 비
시 도 비	4,650	4,250	200	200
시군구비	1,850	1,000		850
지 방 채
민간자본
기 타	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 경상남도 투․융자 승인 : 2013. 10.

○ 실시설계 완료 : 2014. 2.

○ 행정절차 이행 및 보상협의 : 2014. 6. ~ 12.

○ 공사착공 : 2014. 10.

○ 공사준공 : 2018.  6.

□ 향후계획

○ 사업완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

관동소하천 재해예방사업

담당자

건설교통과 이성현(☎960-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을을 관통하는 하천을 우선으로 정비하여 인명 및 주택 등의 피해가

없도록 사전 재해 예방에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 01. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 경상남도 함양군 함양읍 난평리 일원

○ 규 모 : 소하천정비 L=1.51km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,710	1,600	454	836	1,820
국 비	2,355	800	227	418	910
시 도 비
시군구비	2,355	800	227	418	910
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 7. : 실시설계 완료

○ 2016. 1. : 사업 착공

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

미동소하천 재해예방사업

담당자

건설교통과 이성현(☎960-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을을 관통하는 하천을 우선으로 정비하여 인명 및 주택 등의 피해가

없도록 사전 재해 예방에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 01. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 경상남도 함양군 수동면 화산리 일원

○ 규 모 : 소하천정비 L=0.82km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,006	2,200	704	904	3,198
국 비	3,503	1,100	352	452	1599
시 도 비
시군구비	3,503	1,100	352	452	1599
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 7. : 실시설계 완료

○ 2016. 1. : 사업 착공

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

군도9호선(원산~지소)도로 확포장공사

담당자

건설교통과 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미개설된 도로로 종점부에 치유의 숲 휴양림, 불로장생 산삼밸리 등 군

주요사업장 산재로 도로확포장이 시급함

○ 2020 함양 세계 산삼엑스포 개최 등 증가되는 관광객 및 지역주민의

안전한 도로환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.98km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,760백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,760	2,076	684	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,760	2,076	684
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 경상남도 투․융자 승인 : 2013. 10.

○ 실시설계 완료 : 2014. 2.

○ 행정절차 이행 및 보상협의 : 2014. 6. ~ 12.

○ 공사착공 : 2014. 10.

○ 공사준공 : 2018.  6.

□ 향후계획

○ 사업완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

이은~난평간 도로확포장공사

담당자

건설교통과 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일부구간 4차로 개통에 따른 교통불편 및 교통사고 위험 상존

○ 국도3호선과 24호선 연결 및 함양 우회도로 개설로 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 함양군 함양읍 이은리

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.1km, B=9.5m, 교량 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	18,000	200	1,000	4,000	12,800
국 비
시 도 비	15,300	200	1,000	3,000	11,100
시군구비	2,700	0	0	1,000	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 6 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 8 : 행정절차 이행(소규모환경영향평가, 군관리계획결정 등)

○ 2017. 5 : 지방도 노선변경

○ 2017. 8 : 보상협의

□ 향후계획

○ 2019. 1 : 사업착공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상림 산책로 조성사업

담당자

건설교통과 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상림공원 조성계획과 더불어 공원내 산책로 정비로 관광객 및 주민들의

안전하고 편리한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 함양군 함양읍 교산리 ~ 대덕리 일원

○ 규 모 : 산책로 조성 L=0.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,700	600	600	3,316	184
국 비
시 도 비	500	0	0	500	0
시군구비	4,200	600	600	2,816	184
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 1 : 실시설계용역 시행

○ 2017. 5 : 보상협의

○ 2017. 6 : 사업착공

○ 2017. 7 : 공원조성계획 변경 고시

○ 2018. 5 : 지중화 사업 협약 및 착공

□ 향후계획

○ 2019. 6 : 사업준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 산책로 조성 L=1.6km

○ 변경 : 산책로 조성 L=0.9km

○ 변경사유 : 기 확장구간 제외

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산양삼산업화단지조성

담당자

산삼항노화엑스포과

하정민(☎960-4494)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양 산삼의 역사와 전통을 소개하고, 함양산양삼의 산업화와 미래 전시

○ 상림공원에 위치하여 방문수요가 많고, 지역 경제활성화에 기여할 것임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 함양읍 교산리 1043번지

○ 규 모 : 산삼주제관 2층 1,512㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,400	862	2,993	2,545
국 비	2,500	431	1,035	1,034
시 도 비	750	130	235	385
시군구비	3,150	301	1,723	1,126
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 공사 착공 및 준공 : 2017. 1. 4 ~ 2018. 7. 30

○ 건축물 완료 및 외부 토목 및 조경공사 진행중

□ 향후계획

○ 운영에 따른 기간제 근로자 및 입점자 모집 : 2018. 7 ~ 8월

○ 준공식 및 정상 운영 : 2018. 8월 말경

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경 : 5,000백만원 → 6,400백만원

○ 실시설계결과 비선형구조체 건축물로 시공단가 증가

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양군 항노화체험관건립사업

담당자

산삼항노화엑스포과

하정민(☎960-4494)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경남 미래 50년 전략사업인 항노화산업의 홍보와 이용 촉진

○ 상림공원과 연계하여 치유•힐링의 항노화 체험시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 함양읍 교산리 1043-6번지

○ 규 모 : 항노화체험관 2층 728㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000		712	1,288
국 비
시 도 비	1,000		356	644
시군구비	1,000		356	644
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 공사 착공 및 준공 : 2017. 11. 1 ~ 2018. 8. 30

○ 건축물 골조 완료 및 내부 공사중

□ 향후계획

○ 내외부 마감공사 : 2018. 7 ~ 8월

○ 준공식 및 정상 운영 : 2018. 9월 말경

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

천년의숲임산물항노화테마원조성

담당자

산삼항노화엑스포과

하정민(☎960-4494)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양 상림공원의 산양삼산업화단지와 연계 항노화 테마관광개발

○ 년간 100만명이 방문하는 상림공원의 머무르고 소비하는 관광유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020

○ 위 치 : 함양읍 교산리 755-2번지 일원

○ 규 모 : 심마니 역사문화체험장, 산림휴양힐링투어 개발

임산물전략상품개발 및 마케팅, 불로장생 테마길

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,500		150	1,000	2,350
국 비
시 도 비	1,800			110	1,690
시군구비	1,700		150	890	660
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 심마니 역사문화체험장시설공사 기본계획 : 2018. 1 ~ 5

○ 심마니 역사문화체험장시설공사 실시설계 : 2018. 6 ~ 9

□ 향후계획

○ 심마니 역사문화체험장 시설공사 시행 : 2018. 11 ~ 2019. 5

○ 임산물전략상품개발등 마케팅 : 2019년 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지리산 항노화산업 산지유통센터조성

담당자

산삼항노화엑스포과

하정민(☎960-4494)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산양삼 재배와  유통산업의 발전을 통해 산삼의 고장으로 육성하고

○ 함양 산양삼을 지역 임산물 발전을 이끄는 원동력으로 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 함양읍 교산리 1043번지

○ 규 모 : 유통센터 2층 1,236㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,600	108	2,392	1,100
국 비	1,400	50	1,350
시 도 비	450	8	442
시군구비	1,750	50	600	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 공사 착공 및 준공 : 2017. 1. 4 ~ 2018. 7. 30

○ 건축물 완료 및 외부 토목 및 조경공사 진행중

□ 향후계획

○ 운영에 따른 기간제 근로자 및 입점자 모집 : 2018. 7 ~ 8월

○ 준공식 및 정상 운영 : 2018. 8월 말경

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경 : 2,500백만원 → 3,600백만원

○ 실시설계결과 비선형구조체 건축물로 시공단가 증가

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양산삼축제

담당자

산삼항노화엑스포과 임수영(☎960-4381)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양산삼의 우수성 홍보와 농가소득 향상으로 국가지정 대표 축제로

도약발판마련 및 산삼엑스포 기반 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 9. 8. ∼ 9. 17.(10일간)

○ 사 업 비 : 금850백만원(군비 800, 자부담 50)

○ 위    치 : 상림공원 일원

○ 행사내용 : 주제공연, 산삼주제관, 항노화관, 심마니 저잣거리, 황금산삼을 찾아라, 산삼캐기등 체험행사, 판매 등

○ 주최/주관 : 함양군/함양산삼축제위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,400	850	850	850	850
국 비
시 도 비
시군구비	3,200	800	800	800	800
지 방 채
민간자본
기 타	200	50	50	50	50

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017 함양산삼축제 성공적 개최 : ‘17. 9. 8. ~ 9. 17

- 방문객 수 238,484천명, 판매실적 : 1,504,615천원

□ 향후계획

○ 2018 산삼축제 기본계획 수립 : ‘18. 5월

○ 2018 산삼축제 홍보(블로그, SNS, 미디어 등) : ‘18. 3. ~ 9월

○ 2018 산삼축제 실행계획 수립 : ‘18. 8월

○ 2018 함양산삼축제 개최 : ‘18. 9. 7. ~ 9. 16.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

목재문화체험장 조성

담당자

산림녹지과 유한철(☎960-4309)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목재문화체험장 조성으로 관광객유치하여 지역경제활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2018년

○ 위 치 : 안의면 이전리 468-8번지 일원

○ 규 모 : 건축 2동, 야외모험놀이시설 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,244백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,244	2,920	880	1,445	-
국 비	4,160	2,300	704	1,156	-
시 도 비	312	172	53	87	-
시군구비	772	448	122	202	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2013년 : 기본계획 및 실시설계

○ 2014년 : 기반공사(토목 등)

○ 2015년 : 건축 2동(홍보체험관 등)

○ 2016년 : 전시부분 설치공사, 야외 소나무정비 등

○ 2017년 : 야외 모험시설

○ 2018년 : 내부 체험실 및 목공장비 구입 등

□ 향후계획

○ 2018년 조성 완료 후 2019년부터 직영 또는 위탁 운영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산악레포츠활성화지원사업

담당자

산림녹지과 유한철(☎960-4309)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산삼항노화엑스포의 성공적인 개최와 안전하고 쾌적한 산림환경조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년

○ 위 치 : 병곡면 원산리~광평리 숲길 일원

○ 규 모 : 숲길정비 12.84km, 숲길보완 6.66km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,709백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,709	2,690	448	1,571	-
국 비	1,345	1,345	-	-	-
시 도 비	404	404	-	-	-
시군구비	2,960	941	448	1,571	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2014년 : 숲길조성(병곡 원산 ~ 광평지구)

○ 2015년 : 숲길조성(병곡 광평 ~ 대광마을)

○ 2016년 : 숲길조성(병곡 원산 ~ 광평지구)

○ 2017년 : 숲길(임도) 보완사업 실시설계

○ 2018년 : 숲길(임도) 보완사업 시행

□ 향후계획

○ 임도 내 산악열차 운영 등 관광자원 육성

○ 숲길 내 약초류 재배 등 약초길 조성하여 볼거리 제공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

불로장생 산삼휴양밸리 조성

담당자

휴양밸리산업과 이득수

(☎960-4327)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청정 함양 산양삼을 산악관광과 접목시켜 휴양치유 복합관광 단지를 조성함으로써 산촌지역의 새로운 경영수익사업 모델 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산22번지 일원

○ 규 모 :

- 모노레일 설치 L=3.95Km, 상․하부 승강장 1,263.69㎡(3층, 건축면적 939.52㎡)

- 진입도로 정비 L=2.5Km, 주차장 및 기반정비 A=52,400㎡(507대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	25,000	18,750	3,000	3,250	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	20,000	13,750	3,000	3,250	-
시군구비	5,000	5,000	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2013. 06. : 경남미래 50년 전략사업 선정

○ 2013. 12. : 진입도로 정비공사(대봉교~하부승강장) ⇒ 준공(’15. 12.)

○  2014. 03. : 모노레일 하부승강장 설치공사 ⇒ 준공(’16. 08.)

○ 2014. 04. : 모노레일(좌안) 제작 및 설치공사 착공

○  2015. 02. : 진입도로 정비공사(주차장~대봉교) 착공

○  2015. 03. : 주차장 및 기반정비공사 착공

○ 2017. 07. : 모노레일 제작 및 설치(우안)

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 최종 준공(임시운영 2018. 10.~12.)

○ 2019. 01. : 전면 개장

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산림생태·문화체험 단지 조성

담당자

휴양밸리산업과 한상철

(☎960-4896)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여가생활 변화에 따른 체류형 산림휴양공간 조성과 모험레포츠 체험시설을 통해 산림자원의 새로운 수익모델 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2019

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리 산1 일원

○ 규 모

- 진입도로 확·포장  L=1.81Km, B=11m

- 관리사무소, 단체숙소, 식당, 숲속의 집, 캠핑장 등

- 산림레포츠시설(짚라인, 모험지원센터, 산림모형시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	27,000	12,461	1,800	5,000	7,739
국 비	13,500	5,200	900	2,500	4,900
시 도 비	4,050	1,560	270	750	1,470
시군구비	9,450	5,701	630	1,750	1,369
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2014. 05. : 진입도로 정비공사 착공

○ 2015. 04. : 자연휴양림 지정고시 완료

○ 2015. 05. : 기반정비공사 착공

○ 2016. 02. : 자연휴양림 조성계획 승인(경상남도)

○ 2016. 06. : 부대시설공사 착공

○ 2017. 06. : 건축공사 착공

□ 향후계획

○  2019. 12. : 최종 준공

○  2020. 01. : 전면 개장

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

치유의 숲 조성사업

담당자

휴양밸리산업과 김충길

(☎960-4827)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대봉산 천혜 자연환경을 활용한 자연치유 공간 조성으로 인체의 면역력 향상 및 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산1번지 일원

○ 규 모

- 기반정비공사(계류정비, 체험길 조성, 오수관로매설 등)

- 치유센터(724.49㎡, 2층), 요리체험장(252.56㎡, 1층)

- 모험놀이 숲(27종) 조성, 전기‧통신‧소방공사 1식, 감리 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,060백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,060	3,700	1,300	60	-
국 비	2,500	1,850	650	-	-
시 도 비	750	555	195	-	-
시군구비	1,810	1,295	455	60	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2014. 04. : 치유의숲 조성계획 승인(행정절차 완료)

○ 2014. 04. : 기반정비 공사 착공

○ 2014. 05. : 모험놀이숲공사 착공

○ 2015. 02. : 치유센터 건축공사 착공 ⇒ 준공(’16. 06.)

○ 2018. 06. : 치유센터 내부 인테리어 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 최종 준공(임시운영 2018. 10.~12.)

○ 2019. 01. : 전면 개장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

거함산 항노화 휴양체험지구 조성사업

담당자

휴양밸리산업과 김충길

(☎960-4827)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백두대간권(지리산, 덕유산) 관광자원을 연계한 테마형 체험관광 거점 개발로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리, 광평리 일원

○ 규 모

- 기반시설(탐방로, 주차장), 심마니 체험길 L=7.1㎞

- 산삼 콤플렉스센터 2,767㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,800	569	3,091	3,000	3,140
국 비	4,900	130	1,500	1,500	1770
시 도 비	1,470	159	450	450	411
시군구비	3,430	280	1,141	1,050	959
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2012. 04. : 백두대간권 발전종합계획 수립(6개도 공동)

○ 2014. 03. : 내륙권발전 선도사업 선정

○ 2014. 06. : 백두대간발전종합계획 결정 및 고시

○ 2014. 09. : 개발계획수립 용역완료 및 결정 및 고시

○ 2015. 12. : 국비 4억원 확보(3개군 전체)

○ 2016. 11. : 실시설계 용역 착공(~`17. 10.)

○ 2017. 06. : 건축공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 최종준공

○ 2020. 01. : 전면 개장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산림레포츠시설 조성사업

담당자

휴양밸리산업과 김충길

(☎960-4827)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산삼휴양밸리 조성사업과 연계하여 산림레포츠 종합시설을 도입하여 전국 최초 산림레포츠 시범단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리, 광평리 일원

○ 규 모

- MTB지원센터 1동, MTB코스 7.54km, 짚라인 2.19km

- 패러글라이딩 이륙장, 산악마라톤코스 5.6km, 자가발전모노레일(150m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000	739	0	2,000	3,261
국 비	3,000	300	-	1000	1,700
시 도 비	900	90	-	300	510
시군구비	2,100	349	-	700	1,051
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015. 02. : 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 ⇒ 준공(’16. 06.)

○ 2015. 12. : 관련법 제정(시행 2016. 3. 28.)

○ 2016. 01. ~ 2016. 05. : 법 제정으로 인한 기본계획 변경

○ 2016. 06. : 실시설계용역 시행 ⇒ 준공(’16. 12.)

□ 향후계획

○ 2017. 04. : 조성계획 승인 및 사전 행정절차 완료

○ 2017. 06. : 조경공사 착공

○ 2018. 01. : 건축공사 착공

○ 2019. 12. : 최종준공

○ 2020. 01. : 전면 개장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서함양 하이패스IC 설치

담당자

휴양밸리산업과 한상철

(☎960-4896)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양산삼항노화엑스포, 산삼휴양밸리 조성에 따른 관광 접근성 향상 및 시내교통 혼잡개선으로 인한 주민 편의 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 광주~대구고속도로, 병곡면 월암삼거리 부근(광평교 앞)

○ 규 모 : 하이패스 IC 개설 1개소(대구방면 진·출입 램프 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,220	0	200	4,060	1,960
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,660	-	100	2,000	560
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	3,560	-	100	2,060	1,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2016. 05. : 하이패스 IC설치 타당성 용역 시행 ⇒ 준공(’17. 06.)

○ 2017. 06. : 고속도로 연결허가 승인(국토부)

○ 2017. 09. : 운영사업 협약체결(한국도로공사)

○ 2018. 02. : 실시설계용역 시행

□ 향후계획

○ 2018. 08. : 편입토지 보상협의 시행

○ 2018. 09. : 행정절차 이행

○ 2018. 10. : 사업착공

○ 2019. 12. : 최종준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

체류형 농업창업지원센터 건립사업

담당자

농축산과 김판수(☎960-4525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체류형 교육을 통한 신규농업인 조기정착 유도

○ 안정적이고 지속적인 인구유입시스템 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 함양군 함양읍 이은리 85번지 일원(27,557㎡)

○ 규 모(사업량) : 체류형주택 15동(30세대), 세미나동(661.62㎡) 1동,

창고(192㎡) 1동, 하우스(1,000㎡) 1동, 텃밭(3,300㎡) 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,000	531	5,357	2,112	0
국 비	4,000	265.5	2,678.5	1,056	0
시 도 비	1,200	79.65	803.55	316.8	0
시군구비	2,800	185.85	1,874.95	739.2	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73.61%)

○ ‘17.  1월 : 토목공사 시행

○ ‘17.  4월 : 건축, 전기, 통신, 소방공사 시행

○ ‘17.  9월 : 토목공사 준공

○ ‘18.  3월 : 건축, 전기, 통신, 소방공사 준공

□ 향후계획

○ ‘18.  12월 : 주변정비사업 완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양항노화농산물엑스포

담당자

친환경농업과 김근수(☎960-4053)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업인, 농업관련기관·단체 모두가 참여하는 농업인 대축제

○ 2020함양항노화엑스포 행사의 성공적 개최를 위한 청정·건강·장수 고장

으로서의 이미지 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 09. 08. ~ 09. 17.

○ 위 치 : 상림공원 일원

○ 규 모 : 대형텐트 1동(40 x 25m, 1,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2018년 이후
계	1,743	1,381	122	120	120
국 비
시 도 비
시군구비	1,743	1,381	122	120	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 10월 : 사업 완료 및 평가 보고

□ 향후계획

○ 2018. 5월~7월 : 기본계획 및 담당별 계획 수립

○ 2018. 8월 : 업체 계약 및 시설 설치, 행사물품 준비

○ 2018. 9월 : 행사 전 물품 전시 완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농산물 산지유통시설 지원사업

담당자

농산물유통과 김승희

(☎960-4090)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산지유통 수직계열화를 위한 품목별 유통시설 현대화 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015～2017년

○ 위 치 : 함양군 함양읍 신천리 267-2번지 외 5필지

○ 규 모 : 저온창고, 선별장 등 건축공사 4,309㎡, 선별기 등 설비 3종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,538백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,538		5,538
국 비	1,650		1,650
시 도 비	494		494
시군구비	1,155		1,155
지 방 채
민간자본	2,239		2,239
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료 : 2017. 12. 15.

○

□ 향후계획

○ 해당없음

○

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음