물레방아골 함양

새로운 시작 희망찬 함양

산삼․산약초의 고장 함양

천년의 숲 희망의 땅

상하수도사업소

74. 깨끗하고 풍부한 마을상수도 공급 -- 129 75. 맑고 안정적인 지방상수도 공급 - 130 76. 가촌휴촌지구 마을하수도설치사업-- 131

깨끗하고 풍부한 마을상수도 공급

74

❍ 농촌지역 인구 노령화에 따른 마을상수도시설 전문업체 위탁관리로 안전한 생활용수 공급

❍ 긴급보수, 노후, 원수부족, 수질불량 시설에 대한 시설정비 및 암반관정 개발로 생활용수의 안정적 공급과 군민 보건 향상 기여

□ 사업개요                            (단위 : 백만원)

구 분	사업량 및 내용	사업비	추진기간	비 고
마을상수도 유지관리사업	전읍면 마을상수도(274개소) 위탁관리 및 긴급유지보수 연장허가 및 사후관리 9개소 한파대책사업	898	1～12월
소규모 수도시설 개량사업	마천면 실덕마을외 6개지구 소규모 수도시설개량	600	1～10월
농촌농업생활용수 개발사업	함양 양지담외 4개지구 관정개발 및 이용시설정비	1,257	1～11월

□ 추진계획

단계별	세부추진내역			추진일정
준비 단계	•소규모수도시설개량 및 농촌농업생활용수개발 등 사업대상지 조사 및 선정			2012년 중
추진 (시행)	•위탁관리 - 설계도서 작성 및 업체선정(2월) - 위탁관리비[선급금(3월) 및 준공금(12월)] 집행 •사후관리 및 연장허가 - 설계도서 작성 및 업체선정(1월) - 사업시행[선급금(1월) 및 준공금(5월)] 집행	•소규모수도시설개량 - 실시설계(1~3월) - 업체선정(3월) - 각종 편입부지 동의서 징구 및 행정절차 이행(3~8월) - 사업시행[선급금(3월) 및 준공금(10월) 집행] •마을급수시설 긴급복구 발생 시 즉시 조치(연중시행)	•농촌농업생활용수개발 - 지하수기초 및 영향조사(1~4월) - 실시설계(5~6월) - 업체선정(6월) - 각종 편입부지 동의서 징구 및 행정절차 이행(6~9월) - 사업시행[선급금(6월) 및 준공금(11월)집행]	2012.1~11월
사후 관리	•마을급수시설 지속적인 위탁유지관리			지속

✍ 상하수도사업소 관리담당 (☎ 960-5231)

맑고 안정적인 지방상수도 공급

75

❍ 기후변화로 인한 갈수기 상수원 고갈 대비 풍부한 지방상수도

상수원 확보 및 누수율 제고로 지방상수도 보급률 향상

❍ 먹는 물로 인한 주민불편 해소 및 보건위생 향상

□ 사업개요                            (단위 : 백만원)

구 분		사업량 및 내용	사업비	추진기간	비 고
지방상수도 상수원 확보		대체관정 33공	10	연중
지방상수도 유수율 제고		노후관로 교체 21㎞ 누수탐사 용역 1식	505	1～10월	사업추진 ‘09～‘16
지방상수도 보급률 제고	서상농어촌 지방상수도 개발사업	V = 643천㎥ Q = 3,700㎥/일	5,714	1～12월	사업추진 ‘06～‘14
	지방상수도 급수구역 확대사업	배수관로 L = 11㎞	1,000	1～10월	사업추진 ‘10～‘12

□ 그간추진상황

❍ 지방상수도 개발사업 : 수원시설 및 정수장 구조물 5동

❍ 노후관로 교체사업 : 8.3㎞

❍ 급수구역 확대사업 : 7개마을

□ 추진계획

❍ 지방상수도 상수원 확보

- 대체관정 점검 및 보수 : 분기 1회

- 한국농어촌공사 협조체계 구축(소류지 2만㎥ 보조수원공 활용)

❍ 지방상수도 유수율 제고

- 물 절약 홍보 5종(전단지, 현수막, 문자, 홈페이지, 반상회보)

- 노후관로 5.2㎞ 교체로 누수 방지

- 누수탐사 용역 및 신속 복구로 유수율 향상(69% ⇒ 74%)

❍ 지방상수도 보급률 제고

- 서상 지방상수도 개발사업 추진

․저수지 관리도로 개설 및 담수, 정수시설 5동(건축․전기․기계)

- 지방상수도 급수구역 확대 추진

․함양 4개마을(후동,삼천,평촌,기동) 208가구 ⇒ 보급률 향상(53 → 54.5%)✍ 상하수도사업소 상수도담당 (☎ 960-5232)

가촌휴촌지구 마을하수도설치사업

76

□ 함양 지방상수도 취수원 수질개선

□ 마을단위 하수도시설 정비로 생활 환경개선

□ 사업개요

❍ 위    치  : 함양군 병곡면 가촌, 휴촌, 송평마을

❍ 처리구역  : 가촌, 휴촌, 송평, 덕평, 토내(244가구, 524명)

❍ 사업기간  : 2011. 10. 5 ～ 2012. 9. 28

❍ 사 업 량  : 하수처리시설 110㎥/일, 하수관거 4.6km

❍ 총 사업비 : 1,911백만원(국비 70%, 지방비 30%)

□ 그간추진상황

❍ 2011. 4월 : 처리장 부지 협의 보상(기본 및 실시설계 완료)

❍ 2011. 6～9월 : 사업인가, 재원협의, 계약심사 완료

❍ 2011. 10. 5 : 사업착공

□ 추진계획

❍ 2012. 3월 : 하수처리장 시운전 실시

❍ 2012. 3～6월 : 가촌,휴촌마을내 관로 및 배수설비완료

❍ 2012. 8～9월 : 수질검사의뢰 및 준공

□ 건의 또는 향후계획

❍ 하수처리장 위탁운영

✍ 상하수도사업소 하수도담당 (☎ 960-5233)