상하수도사업소

Ⅰ. 2014 업무추진 방향

Ⅱ. 2014 주요업무 계획

□ 마을상수도 유지관리사업

□ 마을상수도 노후관로 교체사업

□ 소규모수도시설 개량사업

□ 서상농어촌 지방상수도 개발사업

□ 서상농어촌 지방상수도 개발사업(급수관로)

□ 유수율 제고사업

□ 함양 지방상수도 보조수원지 확보

□ 지방상수도 급수구역 확장사업

□ 함양읍 하수도관거정비 임대형민자사업(BTL)

□ 함양하수처리장 증설사업

□ 안의 용추계곡지구 마을하수도 설치사업

□ 덕암지구 마을하수도 설치사업

□ 공공하수도 유지관리 사업

□ 공공하수처리시설 운영관리

Ⅲ. 특수시책

□ 백무동하수처리시설 방류구 개량사업

Ⅰ		2014 업무추진 방향

맑고 맛있는 물 공급으로 삶의 질 향상

	목 표
깨끗하고 안정적인 수돗물 생산 공급 마을상수도시설의 체계적 유지관리 하수도시설 확충으로 쾌적한 주거환경 조성
	중점과제
지방상수도 급수구역 확대와 사업의 내실 있는 추진 유수율 제고사업 및 물 사랑 운동 추진 마을상수도 시설개량으로 안정적인 생활용수 확보 하수도처리구역 확대로 하수도 보급률 향상 마을상하수도 정비로 주거환경 개선

	Ⅱ. 2014 주요업무 계획

상하수도사업소 관리담당 ☏ 5231

2014 군정 주요업무

마을상수도 유지관리사업

농촌지역의 인구 노령화에 따른 전문업체 위탁관리와 천재지변 및 노후로 인한 시설물의 긴급한 보수, 정기 및 수시 수질검사 시행으로 군민에게 안정된 생활용수 공급

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 마을상수도 272개소

❍ 사 업 비 : 678백만원(도비 : 30, 군비 : 648)

□ 추진계획

❍ 사업내용

(단위:백만원)

구 분	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계		개소	678	-	30	648
위탁관리	전 읍□면	272	324	-	30	294
긴급보수	전 읍□면	272	200	-	-	200
수질검사	전 읍□면	272	154		-	154

❍ 추진일정

- 2014년 연중 : 긴급보수사업 추진

- 2014. 1월 ~ 12월 : 수질검사 정기 및 수시 시행으로 안정된

생활용수 공급

- 2014. 1월 ~ 2014. 12월 : 마을상수도 위탁관리 시행

□ 기대효과

❍ 시설개선과 체계적 유지관리로 급수에 대한 주민불편 최소화

상하수도사업소 관리담당 ☏ 5231

2014 군정 주요업무

마을상수도 노후관로 교체사업

노후 및 누수로 인해 불편을 겪고 있는 마을상수도 관로를 교체하여 생활용수의 안정적 공급과 군민 삶의 질 향상 기여

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 6월

❍ 사 업 량 : 노후관로교체 2개소

❍ 사 업 비 : 150백만원(군비 : 150)

□ 추진계획

❍ 사업내용                                            (단위:백만원)

구 분	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계	2개소	L= 2.2km	150	-	-	150
광 점	마천면 추성리	L= 1.2km	75	-	-	75
사 평 장자벌	안의면 상원리	L= 1.0km	75	-	-	75

❍ 추진일정

- 2014. 1월  : 실시설계

- 2014. 2월  : 주민설명회

- 2014. 2월 ~ 2014. 6월 : 사업 시행 및 완료

□ 기대효과

❍ 노후관로 교체로 누수율 저감과 안정되고 깨끗한 생활용수 공급

상하수도사업소 관리담당 ☏ 5231

2014 군정 주요업무

소규모수도시설 개량사업

노후, 원수부족, 수질불량 시설에 대한 개량 정비로 생활용수의 안정적 공급과 군민 삶의 질 향상 기여

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 11월

❍ 사 업 량 : 소규모수도시설 개량  5개소

❍ 사 업 비 : 943백만원(국비 : 660, 군비 : 283)

□ 추진계획

❍ 사업내용                                            (단위:백만원)

구 분	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계	5개소	L= 8.65km	943	660	-	283
상대평	백전면 경백리	L= 0.85km	160	112	-	48
연 덕	병곡면 연덕리	L= 1.8km	180	126	-	54
운 서	휴천면 운서리	L= 2.0km	203	142	-	61
식 송	서상면 상남리	L= 2.0km	200	140	-	60
제 전	수동면 내백리	L= 2.0km	200	140	-	60

❍ 추진일정

- 2013. 12월 연중 : 사업대상지 조사 및 확정

- 2014.  1월 ~ 2014.  3월 : 실시설계 및 주민설명회

- 2014.  3월 ~ 2014. 11월 : 사업 시행 및 완료

□ 기대효과

❍ 소규모 수도시설의 개량으로 풍부하고 깨끗한 생활용수 공급 및

주민불편 해소

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

2014 군정 주요업무

서상농어촌 지방상수도 개발사업

❍ 서상농어촌 지방상수도 개발에 따른 안정적인 원수 확보

❍ 서상․서하․안의지구에 원활한 상수도를 공급․확대하여 주민생활

불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 서상·서하·안의면 일원(3개면, 52마을, 7,800명)

❍ 사업기간 : 2006. 12월 ~ 2015. 12월

❍ 사업계획                                             (단위 : 백만원)

시설규모	사 업 량			사 업 비			비고
	수원시설	정수시설	관로시설	계	광특	지방
Q = 3,700㎥/일	대남저수지 V = 643,000㎥	3,700㎥/일	74㎞	46,000	28,400	17,600

□ 그동안 실적

❍ 2007.  8월 : 서상지방상수도 사업 인가

❍ 2010.  4월 : 서상지방상수도 사업 변경 인가

❍ 2013. 12월 : 수원시설, 정수장 건축물 5동 및 관로(3.05km)완료

❍ 총괄진도 : 80%

□ 추진계획

❍ 사업규모 : 송수관로 13.7km, 배수관로 2.7km 계획

❍ 공사추진 : 2014. 2월 ~ 12월

❍ 사 업 비                                      (단위 : 백만원)

계	기투자	2014년	2015년	비 고
46,000	32,500	6,800	6,700

※ 서상면 소재지 일원 급수공급 : 2014. 4월부터

□ 기대효과

❍ 서상, 서하, 안의면 주민들에게 안정적인 수돗물 공급

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

2014 군정 주요업무

서상농어촌 지방상수도 개발사업(급수관로)

서상(서상면, 서하면, 안의면) 농어촌 미급수지역의 생활수준 향상으로 상수도 수요량 증가에 대비하여 수도시설의 효율적 운영관리 및 체계적이고 장기적인 확장계획 수립시행

□ 개    요

❍ 위    치 : 서상·서하·안의면 일원(3개면, 35마을, 1,491가구)

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2017. 12월

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

사 업 량						사 업 비			비고
배수지	가압장	송수 관로	배수 관로	연계 관로	급수 관로	계	광특	지방
V =1,800㎥	6개소	1.94km	16km	10.2km	15.96km	10,100	7,100	3,000

□ 그동안 실적

❍ 2013.  3월 : 서상지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계용역

❍ 2013.  5월 : 환경부 2014년 예산반영

❍ 2013. 10월 : 실시설계용역 준공

□ 2014년 추진계획

❍ 사업규모 : 배수관로 5.5km 급수관로 3km계획

❍ 공사추진 : 2014. 2월 ~ 12월

❍ 사 업 비                                      (단위 : 백만원)

계	기투자	2014년	2015년	비 고
10,100	0	700	9,400

※ 서상면 소재지 일원 급수공급 : 2014. 4월부터

□ 기대효과

❍ 미급수 구역의 안정적인 수돗물 공급

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

2014 군정 주요업무

유수율 제고사업

❍ 상수도 관로의 노후 및 파손 등 누수로 인한 생활불편 해소

❍ 수돗물의 안정적인 급수를 통한 지방상수도 운영의 효율화

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 지방상수도 급수구역 전체

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2015년(6개년)

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계		기투자		2014년도		2015이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		3,933		2,703		270		960
노후관로 개량	20.4㎞	3,573	14.4	2,513	1.0	200	5.0	860
누수탐사 용역	1식	360	1식	190	1식	70	1식	100

□ 추진계획

❍ 2014. 1월 ~  3월 : 실시설계 및 도로굴착 심의 등 행정절차 이행

❍ 2014. 4월 ~ 10월 : 사업시행

❍ 연중(수시) : 누수탐사 용역

□ 기대효과

❍ 파손 및 노후관로 개량으로 누수율 저감

❍ 누수탐사에 따른 누수관 신속 복구로 유수율 향상

❍ 누수량 저감 및 유수율 향상으로 수돗물 안정공급

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

2014 군정 주요업무

함양 지방상수도 보조수원지 확보

❍ 갈수기 원수부족 및 봄철 영농작업에 따른 흙탕물․질산 등 오염물질      유입으로 정수에 애로가 있어,

❍ 보조수원지 개발을 통한 원수의 안정적 확보로 원활한 가정급수

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 월암리 594-1(금당골 소류지5,600㎥)

❍ 사 업 량 : 저수지 확장보강 1식, 관로신설 L=3.25km

❍ 사 업 비 : 1,200백만원

❍ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2015. 12월

□ 그동안 실적

❍ 2013.  2월 : 소류지 관리이관 협의 및 원수사용 협의

(한국농어촌공사 거창․함양지사)

❍ 2013.  3월 : 인․허가 등 행정절차 이행

❍ 2013. 12월 : 관로신설 1.16km(D350 L=0.58km, D200 L=0.58km)

(함양정수장 ~ 죽장마을)

□ 추진계획

❍ 사업규모 : 관로신설 1.2km(D350 L=0.6km, D200 L=0.6km)

(죽장마을 ~ 도천마을)

❍ 공사추진 : 2014. 2월 ~ 12월

❍ 사 업 비                                          (단위 : 백만원)

계	기투자	2014년	2015년이후	비 고
1,200	260	260	680

□ 기대효과

❍ 안정적인 원수 확보로 지방상수도 공급체계 개선

❍ 깨끗하고 안정적인 “물” 공급을 통한 군민 삶의 질 향상

상하수도사업소 상수도담당 ☏ 5232

2014 군정 주요업무

지방상수도 급수구역 확장사업

❍ 기후변화로 인한 지하수 고갈 및 수질오염에 대비, 지방상수도      확대 공급으로 주민불편 최소화

❍ 수도정비기본계획에 따른 단계별 확대로 지방상수도 보급률 향상

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 10월

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

위치	가구수	사업량	사업비	수도정비 기본계획	비고
지곡면 백일 마을	47	L = 1.5km	250	1단계 (2010년부터)	지하수

※ 현재까지 확장실적 : 13개마을 1,157명, 38억원

□ 추진계획

❍ 2013.  12월 : 사업대상지 사전 조사

❍ 2014. 1~3월 : 실시설계, 도로굴착 심의등 행정절차 이행

❍ 2014. 4~6월 : 사업시행 및 준공

❍ 수압시험 및 지방상수도 급수(2014. 7. 1일부터 급수개시 예정)

□ 기대효과

❍ 먹는 물 시설이 열악한 지역 주민에게 안정된 수돗물 공급

❍ 상수도 공급으로 주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

2014 군정 주요업무

함양읍 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)

❍ 하수관거를 우·오수 분리하여 하수 처리함으로 수처리 효율제고

및 주거환경개선

❍ 함양읍 시가지 우수 관로를 정비하여 강우시 도심의 원활한 배수

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 시가지

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2018. 11월

❍ 사 업 량 : 관거 L=36.6km, 저류시설 1개소

❍ 총사업비 : 605억원(민자 597, 군비 8)

□ 그동안 실적

❍ 2012. 4월 : 2013년 하수관거정비 BTL사업선정(환경부)

❍ 2013. 1월 : BTL사업 한도액 정부공고(대통령 공고)

❍ 2013. 2월 : 사업시행 위·수탁 협약채결(한국환경공단)

❍ 2013. 12월 : 대상사업지정, 기본계획수립 고시

□ 추진계획

❍ 2014. 1 ~ 10월 : 사업계획서 평가, 사업시행자 협상 및 실시협약체결

❍ 2014. 10월 ~ 2015. 6월 : 실시계획 승인 및 고시

❍ 2015. 7월 ~ 2018. 11월 : 사업시행

❍ 2018. 12월 ~ 2038. 12월 : 위탁운영 및 운영성과 평가(20년)

□ 기대효과

❍ 우·오수 분리함으로 수처리 효율제고로 주민의 삶의 질 향상

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

2014 군정 주요업무

함양하수처리장 증설사업

❍ 4대강 중점관리 구역 내 하수처리시설에 대한 방류수 수질기준 강화

❍ 생활수준 향상에 따른 하수발생량 증가 대비

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 함양하수처리장

❍ 사업기간 : 2012. 1 ~ 2015. 12월(계속사업)

❍ 사 업 량 : 증설 2,600㎥/일(7,000㎥/일⇒9,600㎥/일)

❍ 총사업비 : 7,102백만원(국비 2,669, 지방비 4,433)

□ 그동안 실적

❍ 2013. 2월 : 하수처리 공법선정

❍ 2013. 9월 : 기본 및 실시설계

❍ 2013. 9월 : 사업인가, 재원협의

❍ 2013. 12월 : 사업시행

□ 추진계획

(금액 : 백만원)

구분	총 사업비		기투자		2014년		2015년 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
총계		7,012		2,323		3,338		1,441
국비	처리시설 (증설) 2,600㎥	2,669	기본 및 실시설계 1식	1,190	처리시설 (증설) 30%	1,408	처리시설 (증설) 70%	71
도비		1,334		545		704		85
군비		1,335		588		704		43
소계	시설개량 1식	1,764		-	시설개량 1식	522	시설개량 1식	1,242
군비		1,764		-		522		1,242

❍ 2015. 12월 : 시운전, 사업완료

□ 기대효과

❍ 하수용량 시설 증설로 안정적 하수처리 및 수질개선

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

2014 군정 주요업무

안의 용추계곡지구 마을하수도 설치사업

❍ 상수원 상류지역 마을하수도 설치로 하천수질 보전

❍ 용추계곡 유원지 주변 깨끗한 환경조성으로 관광기반 구축

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 안의면 상·하원리 일원

❍ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2014. 12월(계속사업)

❍ 사 업 량 : 하수관거 21.5km, 하수처리장(Q=460㎥/일)

❍ 총사업비 : 4,783백만원(국비 1,875, 지방비 2,908)

□ 그동안 실적

❍ 2010.  8월 : 주관로(L=6.8km)완료

❍ 2010. 10월 : 하수처리장(Q=460㎥/일)

❍ 2013. 12월 : 마을별 하수관거 정비 L=9km

□ 추진계획

❍ 마을별 하수관거 정비 L=7.5km : ’14. 12월

❍ 년차별 사업계획

(금액 : 백만원)

구분	총 사업비		기투자		2014년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	- 처리장 460톤 - 관거 21.5km	4,757	- 처리장 460톤 - 관거 14km	3,948	관거 7.5km	809
국비		1,875		1,309		566
도비		381		260		121
군비		2,501		2,379		122

❍ 2014. 12월 : 시운전 및 완료

□ 기대효과

❍ 쾌적한 정주여건 조성 및 안의지방상수원 상류 수질개선

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

2014 군정 주요업무

덕암지구 마을하수도 설치사업

❍ 남강댐 상류지역 물 자원의 효율적 운용관리로 공공수역에 수질향상

❍ 생활 필수기반시설인 하수도정비로 주민의 삶의 질 향상

□ 개    요

❍ 위    치 : 지곡면 덕암·오평

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2015. 12월

❍ 사 업 량 : 하수처리장(Q=45㎥/일), 하수관로 3.5km

❍ 총사업비 : 1,600백만원(국비 1,120, 지방비 480)

□ 그동안 실적

❍ 2010. 6월 : 기본 및 실시설계

❍ 2011. 5월 : 처리장 부지매입

□ 추진계획

❍ 년차별 사업계획

(금액 : 백만원)

구분	총 사업비		2014년		2015년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 45㎥/일 하수관로 3.5km	1,600	처리장 45㎥/일 하수관로 3.5km	714	처리장 45㎥/일 하수관로 3.5km	886
국비		1,120		500		620
도비		240		107		133
군비		240		107		133

❍ 2014. 1월 : 사업인가 및 재원협의

❍ 2014. 2월 : 사업시행

❍ 2015. 12월 : 시운전 및 완공

□ 기대효과

❍ 마을하수도 정비사업을 통해 주거환겨을 향상하여 쾌적한 정주여건

조성 및 삶의 질 향상

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

2014 군정 주요업무

공공하수도 유지관리 사업

❍ 공공하수도시설의 원활한 운영을 위한 긴급재해·유지복구사업

❍ 노후관로개량 및 맨홀펌프장, 관로준설을 통한 민원해소

□ 개    요

❍ 위    치 : 공공하수처리구역 50개소

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12월

❍ 사 업 량 : 하수도시설유지·긴급복구, CCTV조사·시험, 관로준설

❍ 총사업비 : 2,552백만원(기투자 2,384, 2014년 168)

□ 추진계획

❍ 사업내용

(금액 : 백만원)

구분	총 사업비		기투자		2014년 계획		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
군비	유지관리 1식	2,552	유지관리 1식	2,384	유지관리 1식	168

❍ 2014년 사업계획

세부사업명	사업량	사업비	비고
계		168
재해저감위기관리대응 및 시설유지관리	- 유지관리 1식	100
하수도관로 CCTV 및 시험조사	- 관로내부조사 1식	18
하수관거악취방지 및 준설	- 준설 1식	50

□ 기대효과

❍ 주기적인 시설정비·관리로 원활한 하수소통 및 악취저감

❍ 재해예방 및 긴급복구로 주민불편 해소

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

2014 군정 주요업무

공공하수처리시설 운영관리

❍ 생활하수의 적정처리를 위한 공공하수처리시설의 운영관리

❍ 공공수역의 수질보전으로 청정함양 이미지유지 및 삶의 질 향상도모

□ 개    요

❍ 대상시설 : 공공하수처리시설 50개소(하수3, 소규모47)

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12월

❍ 사업내용 : 하수도시설 위탁운영․전기요금, 유지보수

❍ 사 업 비 : 2,259백만원(기금: 979, 군비: 1,280)

□ 추진계획

❍ 추진내용

(금액 : 백만원)

세부 사업명	사 업 량	확보사업비	실제필요
계		2,259	2530
공공하수처리 위탁운영	시설 유지관리 1식	1279	1,290
노후시설 개보수	개보수․시설관리 1식	230	530
시설 일반운영	전기․슬러지․법정검사 등	436	610
통합시스템 운영관리	유지관리․보수비 1식	100	100

□ 기대효과

❍ 안정적 공공하수처리시설 운영관리 및 공공수역 수질보전

□ 문제점

❍ 위탁운영비등 확보사업비 부족으로 2014년 1회 추경시

군비271백만원 추가확보가 요구됨

	Ⅲ. 특수시책

상하수도사업소 하수도담당 ☏ 5233

2014 군정 주요업무

백무동하수처리시설 방류구 개량 사업

❍ 마천면 당흥외 6개 마을상수도 취수원 수질보호를 위한 하수처리시설 방류지점 개량

❍ 공공수역의 수질보전으로 군민의 삶의 질 향상 및 정주권 보장

□ 개    요

❍ 위    치 : 마천면 가흥리(임천)

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 10월

❍ 사 업 량 : 맨홀펌프장 4개소, 관로 2.7km

❍ 사 업 비 : 450백만원

□ 추진계획

❍ 2014. 1 ~  3월 : 실시설계

❍ 2014. 4 ~ 10월 : 맨홀펌프장 및 관로공사 시행

❍ 2014.11 ~ 12월 : 시운전 및 수질검사

□ 기대효과

❍ 당흥외 6개 마을 안정적 상수도 수자원 공급

❍ 매년 백무동 하천(강청천) 녹조에 따른 민원해소