.

지 역 발 전 과

Ⅰ. 2018 업무추진 방향	295

Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 함양 대봉산 산림욕장 조성사업	299

□ 산삼휴양밸리 에너지자립화사업	300

2. 역점(특수)시책

□ 산삼 휴양밸리 연계사업 현황(총괄)	301

□ 서함양 하이패스 IC개설추진	302

□ 산삼휴양밸리 조성사업	303

□ 산림 생태문화체험단지조성사업	304

□ 거‧함‧산 항노화 휴양체험지구 조성사업	305

□ 대봉산 산림 레포츠단지 조성사업	306

3. 일반계속사업

□ 산삼휴양밸리 홍보마케팅전략추진	307

□ 함양안의봄날센터를통한 생활복지기반조성	308

□ 지리산케이블카 공동개설추진	309

□ 개발촉진지구 다곡리조트 개발사업	310

□ 개발촉진지구 함양리조트 개발사업	311

Ⅰ		2018 업무추진 방향

지역의 발전 잠재력 개발로 균형발전도모

	전략목표
□ 경제적·사회적 성장촉진에 필요한 사회 기반시설 및 관광인프라 확충 □ 함양 산삼 휴양밸리 조성 □ 지역발전 견인을 위한 전략사업 발굴
	단위사업
① 대봉산 산림욕장 조성사업 ② 산삼휴양밸리 에너지 자립화 사업 ③ 산삼 휴양밸리 조성사업 ④ 서함양 하이패스 IC 개설 추진 ⑤ 산림 생태문화 체험단지 조성사업 ⑥ 거‧함‧산 항노화 휴양체험지구 조성사업 ⑦ 대봉산 산림 레포츠단지 조성사업 ⑧ 산삼 휴양밸리 홍보 마케팅 전략 추진 ⑨ 함양안의 봄날센터를 통한 생활복지 기반조성사업 ⑩ 지리산 케이블카 공동개설 추진 ⑪ 개발촉진지구 내 다곡리조트, 함양리조트 개발사업

	Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1

1

함양 대봉산 산림욕장 조성사업

휴양밸리담당 ☏ 5223

신규사업

산삼휴양밸리 인근에 자연친화적인 산림욕장을 조성하여 증가하는

산림휴양 수요 충족을 통한 대 국민 보건휴양 서비스 제공으로

관광객 유치효과 극대화

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산 17번지 일원

❍ 사 업 비 : 400백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

❍ 사업내용 : 9.5ha(탐방로, 전망대, 체육시설 및 음수대 설치 등)

□ 추진계획

❍ 2017. 12월 : 실시설계 완료

❍ 2018.  1월 : 사업착공

❍ 2018. 12월 : 사업준공 및 개장

□ 기대효과

❍ 경남미래 50년 전략사업인 산삼휴양밸리와 연계하여 대국민 산림 휴양서비스 제공 및 관광객 적극 유치

❍ 산림자원을 적극 활용한 산림복합휴양단지 조성으로 지역경제 활성화

1

2

산삼휴양밸리 에너지 자립화 사업

휴양밸리담당 ☏ 5223

신규사업

산삼휴양밸리 내 대용량 전력시설 사용에 따른 정부지원사업 등

신재생 에너지를 적극 유치하여 친환경 에너지타운 조성으로

에너지자립화 및 관광홍보 극대화

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산 22번지 외

❍ 사 업 비 : 2,737백만원(국비 708, 군비 2,029)

- 융복합지원사업 : 1,616백만원(국비 708, 군비 908)

- 태양광발전설치사업 : 1,121백만원

❍ 사업내용 : 신재생에너지 설치 826.5㎾(연간발전량 1,085㎿h)

- 융복합지원사업 : 태양광 163.3㎾, 태양열 117.7㎡, 지열 85.5㎾, 풍력 60㎾

- 태양광발전설치사업 : 태양광 400㎾

❍ 산삼휴양밸리 에너지자립화 연도별 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	계		2017년까지		2018년 시행		2019년 시행		2019년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	소요량 4,161㎿h 목표량 4,184㎿h (100.4%)	9,770	태양광 218㎿h (5.2%)	333	융·복합지원사업 및 태양광발전사업 1,085㎿h (26%)	2,737	융·복합지원사업 (원산지구) 465㎿h (11.2%)	1,700	태양광 2,416㎿h(58%)	5,000
국도비		3,724		166		708		850		2,000
시군비		5,046		167		2,029		850		2,000
기타		1,000		-		-		-		1,000

※ 연간 예상 전기사용량 4,161㎿, 전기요금 630백만원

□ 추진계획

❍ 2018.  1월 : 실시설계 완료

❍ 2018.  2월 : 사업착공

❍ 2018.  6월 : 2019년도 융복합 공모사업 신청(원산지구)

❍ 2018. 12월 : 사업준공 및 전력생산(광평지구)

□ 기대효과

❍ 산삼휴양밸리 내 에너지 자립화 실현을 통한 수익개선 구조 마련

및 친환경 에너지 타운 조성으로 홍보를 통한 관광객 적극 유치

1

1

산삼 휴양밸리 연계사업 현황(총괄)

휴양밸리담당 ☏ 5223

역점 및 특수시책

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2005년 ~ 2019년

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 광평리, 원산리 일원

❍ 규    모 : 598ha

❍ 총사업비 : 101,730백만원(국비 38,601, 도비 31,530, 군비 31,599)

❍ 사업개소 : 12개소 (준공 8개소, 추진중 4개소)

구분	세부사업명		면적 (ha)	사업비(백만원)				준공 (예정)	비고
				계	기 투자	‛18계획	잔여
계 (12개소)			598	101,730	74,339	13,250	14,141
완료 ․ 보완 사업	소계(8개소)		350	33,930	33,930	-	-
	①산림경영 모델 숲 조성사업 (산림청)		81	2,485	2,485	-	-	2009	준공
	②마평 산촌 생태마을 조성사업 (산림청)		1	1,200	1,200	-	-	2009	준공
	③대단위 산림복합경영단지 조성사업 (산림청)		53	2,000	2,000	-	-	2014	준공
	④산악레포츠숲길 조성사업 (산림청)		-	2,690	2,690	-	-	2016	준공
	⑤대봉산 생태 숲 조성사업 (산림청/함양군)	기존	184	8,150	8,150	-	-	2014	준공
		보완	-	453	453	-	-	2016	준공
	⑥대봉산 자연휴양림 조성사업 (산림청)	기존	31	2,952	2,952	-	-	2012	준공
		보완	-	2,000	2,000	-	-	2017	준공
	⑦치유의 숲 조성사업 (산림청)		65	5,000	5,000	-	-	2017	준공
	⑧환경성질환 예방관리 센터 조성사업 (환경부)		20	7,000	7,000	-	-	2017	준공
추진중 사업	소계(4개소)		248	67,800	40,409	13,250	14,141
	①산삼 휴양밸리 조성사업 (도비보조)		20	25,000	21,750	3,250	-	2018	공사중 (‛17추경 30억확보)
	②산림생태문화체험단지 조성사업 (산림청)		143	27,000	14,261	5,000	7,739	2019	공사중
	③거․함․산항노화 휴양체험 지구 조성사업 (문광부)		-	9,800	3,660	3,000	3,140	2019	용역중 (건축시행)
	④산림레포츠단지 조성사업 (산림청)		-	6,000	738	2,000	3,262	2019	공사중

1

2

서함양 하이패스 IC 개설 추진

휴양밸리담당 ☏ 5223

역점 및 특수시책

❍ 2020함양산삼항노화엑스포, 산삼휴양밸리 조성에 따른 관광 접근성 향상

❍ 시내교통 혼잡 개선으로 인한 주민 편의 증대

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4개년)

❍ 설치근거 : 고속국도 IC 추가설치 기준 및 운영 등에 관한 지침

❍ 위    치 : 광주~대구고속도로 상, 병곡 월암삼거리 부근(광평천교 앞)

❍ 사 업 량 : 하이패스 IC 개설 1개소 (대구방면 진․출입 램프설치)

❍ 사 업 비 : 69억원 정도(영업시설→도로공사, 보상비→함양군, 그 외 50% 씩 부담)

(단위:억원)

구 분	총계	접속도로(군도16호선)			하이패스I.C 연결램프				비고
		소계	공사비	보상비	소계	공사비	영업시설	보상비
계	69.1	7.0	6.0	1.0	62.1	49.2	11.0	1.9
함양군	33.5	7.0	6.0	1.0	26.5	24.6	-	1.9
도로공사	35.6	-	-	-	35.6	24.6	11.0	-

□ 추진실적 및 계획

❍ 2016.  5월 : 하이패스 IC설치 타당성 용역 시행

❍ 2017.  6월 : 고속도로 연결허가 신청승인(국토부 → 함양군)

❍ 2017.  9월 : 운영사업 협약체결(함양군 ↔ 한국도로공사)

❍ 2017. 11월 : 실시설계 용역 시행

❍ 2018.  3월 : 공사 착공

□ 기대효과

❍ 고속도로 접근성 향상을 통한 지역경제 활성화 및 주민 편의증진

(IC ↔ 엑스포 행사장 2분, IC ↔ 산삼휴양밸리 5분)

1

3

산삼 휴양밸리 조성사업

휴양밸리담당 ☏ 5223

역점 및 특수시책

청정 함양 산양삼을 산악관광과 접목시켜 휴양치유 복합관광 단지를

조성함으로써 산촌지역의 새로운 경영수익사업 모델 창출

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2018년

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 광평리 산22 일원

❍ 사 업 량

- 모노레일 설치 L=3.95㎞,

- 상․하부 승강장 1,263.69㎡(3층, 건축면적 939.52㎡)

- 진입도로 정비 L=2.5㎞, 주차장 및 기반정비 A=52,400㎡(507대)

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2018년 이후	비 고
계	25,000	21,750	3,250	-
국 비	-	-	-	-
도 비	20,000	16,750	3,250	-
군 비	5,000	5,000	-	-

□ 추진실적

❍ 2013. 12월 : 진입도로 정비공사(대봉교~하부승강장) ⇒ 준공(’15. 12.)

❍ 2014.  3월 : 모노레일 하부승강장 설치공사 착공 ⇒ 준공(’16. 8.)

❍ 2015.  2월 : 진입도로 정비공사(주차장~대봉교) 착공 ⇒ 공사중

❍ 2015.  3월 : 주차장 및 기반정비공사 착공 ⇒ 공사중

❍ 2016.  9월 : 모노레일 환경영향평가 협의완료 및 궤도사업 변경허가 신청

❍ 2017.  7월 : 모노레일 제작 및 설치(좌안 L=1.967㎞) 완료

❍ 2017.  8월 : 모노레일 제작 및 설치(우안 L=1.983㎞) 시행

□ 추진계획

❍ 2018. 10월 : 모노레일 제작 및 설치 완료(우안)

❍ 2018. 11월 ~ 12월 : 개장준비 및 임시운영

❍ 2019.  1월 : 전면 개장

□ 기대효과

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포 거점단지로 경남미래 50년 발전의 기반 마련

1

4

산림 생태문화 체험단지 조성사업

휴양밸리담당 ☏ 5223

역점 및 특수시책

여가생활 변화에 따른 체류형 산림휴양공간 조성과 모험 레포츠

체험시설을 통한 산림자원의 새로운 수익모델 창출

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2019년

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 원산리 산1 일원

❍ 사 업 량

- 진입도로 확·포장  L=1.81Km, B=11m

- 관리사무소, 단체숙소, 식당, 숲속의 집, 캠핑장

- 산림레포츠시설(짚라인, 모험지원센터, 산림모형시설 등)

❍ 사 업 비                                         (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2018년 이후	비 고
계	27,000	14,261	5,000	7,739
국 비	13,500	6,100	2,500	4,900
도 비	4,050	1,830	750	1,470
군 비	9,450	6,331	1,750	1,369

□ 추진실적

❍ 2014.  5월 : 진입도로 정비공사 착공 ⇒ 준공(’17. 5.)

❍ 2015.  4월 : 자연휴양림 지정고시

❍ 2015.  5월 : 기반정비공사 착공 ⇒ 준공(’17. 6.)

❍ 2016.  2월 : 자연휴양림 조성계획 승인(경상남도)

❍ 2016.  6월 : 부대시설공사 착공 ⇒ 공사중

❍ 2017.  6월 : 건축공사(전기,소방,통신) 착공

□ 추진계획

❍ 2019. 12월 : 최종 준공

❍ 2020.  1월 : 전면 개장

□ 기대효과

❍ 체류형 산림휴양시설 확충으로 낙후된 지역경제 활성화 도모

1

5

거‧함‧산 항노화 휴양체험지구 조성사업

휴양밸리담당 ☏ 5223

역점 및 특수시책

백두대간권(지리산, 덕유산) 관광자원을 연계한 테마형 체험관광 거점 개발

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 원산리, 광평리 일원

❍ 사 업 량

- 기반시설(탐방로, 주차장), 심마니 체험길 L=7.1㎞

- 산삼 콤플렉스센터 2,767㎡(지하1층, 지상3층)

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2018년 이후	비 고
계	9,800	3,660	3,000	3,140
국 비	4,900	1,630	1,500	1,770
도 비	1,470	609	450	411
군 비	3,430	1,421	1050	959

□ 추진실적

❍ 2014.  3월 : 내륙권발전 선도사업 선정

❍ 2014.  9월 : 개발계획수립 용역완료 및 결정 및 고시

❍ 2016.  7월 : 중앙부처 확정(문화관광체육부)

❍ 2016. 11월 : 실시설계 용역 시행

❍ 2017.  2월 : 기반시설(주차장 보완사업) 착공

❍ 2017.  6월 : 건축공사(산삼콤플렉스센터) 착공

□ 추진계획

❍ 2019. 12월 : 건축공사 준공

□ 기대효과

❍ 지역간 항노화 네크워크 구축으로 낙후된 서부경남 경제 활성화 도모

1

6

대봉산 산림레포츠시설 조성사업

휴양밸리담당 ☏ 5223

역점 및 특수시책

산삼휴양밸리 조성사업과 연계한 산림레포츠 종합시설 도입으로

전국 최초 산림레포츠 시범단지 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 원산리, 광평리 일원

❍ 사 업 량

- MTB지원센터 1동(2층, 연면적 896.7㎡), 짚라인 2.19km

- MTB코스 7.54km(상급코스 6.13㎞, 초급코스 1.41㎞), MTB체험장

- 패러글라이딩 이․착륙장, 산악마라톤코스 5.6km, 자가발전자전거모노레일(100m)

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2018년 이후	비 고
계	6,000	738	2,000	3,262
국 비	3,000	300	1,000	1,700
도 비	900	90	300	510
군 비	2,100	348	700	1,052

□ 추진실적

❍ 2015.  2월 ~ 2016.  6월 : 기본계획 및 타당성 조사용역 시행

❍ 2015. 12월 : 관련법 제정

※ 산림문화휴양에 관한 법률(시행 2016. 3. 28.)

❍ 2016.  6월 ~ 2016.  12월 : 실시설계용역 시행

❍ 2017.  4월 : 조성계획 승인 및 사전 행정절차 완료

❍ 2017.  6월 : 산림레포츠시설공사 착공

□ 추진계획

❍ 2019. 12월 : 최종 준공

❍ 2020.  1월 : 전면 개장

□ 기대효과

❍ 함양미래 100년 사업인 산삼휴양밸리 조성사업과 연계하여 산림레포츠 종합시설을 조성하여 일자리 창출 및 지역주민 소득증대 기여

1

1

산삼휴양밸리 홍보 마케팅 전략 추진

휴양밸리T/F팀 ☏ 5224

일반계속사업

산삼휴양밸리 조성사업  단계적‧전략적 홍보마케팅을 위한 기반

구축으로 대 국민 인지도 제고를 통한 관광객 유치 도모

□ 추진개요

1 단 계		2 단 계		3 단 계
홍보 인프라 구축	▹	군민 공감대 형성	▹	확신·신뢰·긍지
홈페이지 제작		사업설명 및 지역언론 홍보		전 군민 홍보요원화
2018. 1월∼ 6월		2018. 1월∼9월		2018.10월∼EXPO개최시

□ 추진계획

❍ 기획보도를 통한 올바른 정보 제공

- 기    간 : 2018. 1월 ∼ 2018. 12월

- 내    용 : 사업의 비전과 파급효과 등 사업의 당위성 홍보

- 보 도 처 : 지역신문

❍ 찾아가는 홍보를 통한 군민 공감대 형성

- 기    간 : 2018. 1월 ∼ 2018. 12월

- 내    용 : 읍·면을 직접 찾아가 홍보자료 배포와 설명을 통한 군민 공감대 형성

❍ 홍보마케팅 인프라 구축

구 분	규 격	수량	소요예산	제작시기	비고
홍보 리플릿	38㎝ × 21㎝ (4단 접이식)	8,000부	8백만원	연중
홈페이지		1식	40백만원	2018.6월경

□ 기대효과

❍ 대내적으로 사업에 대한 공감대 형성으로 군민 우려 해소

❍ 대외적으로 사업홍보로 인한 관광객 유치효과 거양

1

2

행복 안의 봄날센터를 통한 생활복지 기반조성

지역사업담당 ☏ 5222

일반계속사업

행복안의 봄날센터, 안의 선비공원 조성 등 광풍루 인근 자연과 문화가

융·복합된 다양한 콘텐츠를 통해 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2019(3개년)

❍ 위    치 : 안의면 강변로 303일원(광풍루 일원)

❍ 사 업 량 : 행복안의 봄날센터 1동, 주차장 설치 등

❍ 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2018년 이후	비 고
계	4,420	2,594	949	877
국 비	2,057	565	645	847
도 비	-	-	-	-
군 비	2,363	2,029	304	30

□ 추진실적

❍ 2017.  2월 ~ 2018.  3월 : 편입부지 감정평가 및 보상

❍ 2017.  3월 ~ 2017. 12월 : 실시설계 및 관계기관 협의

❍ 2017.  9월 : 지역개발사업구역 지정(지정권자 : 경상남도지사)

❍ 2017. 12월 : 실시계획 승인고시

□ 추진계획

❍ 2018.  1월 : 사업착공

❍ 2019. 12월 : 사업준공

□ 기대효과

❍ 행복안의 봄날센터, 안의 선비공원 조성으로 지역주민의 문화 및 여가 공간의 확대와 생활복지기반 구축을 통한 생활여건 개선

1

3

지리산 케이블카 공동개설 추진

지역사업담당 ☏ 5222

일반계속사업

❍ 친환경 지리산 케이블카 설치를 통해 공원의 지속가능한 보전

❍ 전라권에 편중된 지리산 관광주도권 우위 선점

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2021년

❍ 노선구간 : 함양군 마천면 추성리 ~ 산청군 시천면 중산리

❍ 사 업 량 : 삭도연장 L=10.6㎞(함양 6.2㎞ 산청 4.4㎞)

❍ 사 업 비 : 1,177억원(추정)

❍ 추진기관 : 경상남도, 함양군, 산청군, 경남개발공사

□ 추진실적

❍ 2012. 6월 : 4개시군 케이블카 시범사업 환경부 신청 부결

❍ 경상남도지사 케이블카 설치 함양, 산청 상생방안 검토지시

※ 2014. 8. 26.(시장․군수 정책회의), 2014. 9. 1.(실국원장 회의)

❍ 2015. 10월 : 국립공원계획변경 용역 등 시행(경남개발공사 대행)

❍ 2016. 5. 30. : 국립공원계획변경(안) 접수(경상남도 ⇒ 환경부)(1차)

❍ 2016. 7. 6. : 국립공원계획변경건 반려(환경부 ⇒ 경상남도)

❍ 2016. 12. 29. : 국립공원계획변경(안) 접수(경상남도 ⇒ 환경부)(2차)

❍ 2017. 2. 9. : 국립공원계획변경건 반려(환경부 ⇒ 경상남도)

□ 추진계획

❍ 경상남도, 함양, 산청 간 전략적 협력으로, 친환경 케이블카 유치 총력

□ 기대효과

❍ 지리산국립공원의 자연경관 감상기회 제공 및 관광자원을 통한 지역경제 활성화

❍ 전라권에 편중된 지리산관광 주도권을 경상권으로 흡수 기대

1

4

개발촉진지구 다곡리조트 개발사업

지역발전담당 ☏ 5221

일반계속사업

❍ 산악형 관광지 조성으로 지역발전을 유도

❍ 상대적 낙후지역인 서부경남의 발전기반 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 지곡면 덕암리, 서하면 다곡리 일원

❍ 면    적 : 9,732,170㎡(2,944천평)

※ 토지매입 934필지 / 5,630,789㎡ (58%)

❍ 사업기간 : 2005년 ~ 2016년

❍ 사 업 비 : 7,200억원(민자유치)

❍ 주요시설 : 스키장(눈썰매장), 골프장, 건강․휴양마을, 생태공원 등

□ 추진경과

❍ 2005. 10. 13. : 개발계획 수립 고시 (함양군 고시 제2005-41호)

❍ 2005. 12.  1. : 시행자 지정 (함양군 고시 제2005-46호)

❍ 2011. 12.  5. : 실시계획 승인 (함양군 고시 제2011-71호)

❍ 2015. 10. 20. : 행정처분을 위한 청문실시

❍ 2016.  3.  7. : 시행자 지정취소(각종 개발부담금 미납, 미착공)

❍ 2016. 12. 31. : 개발계획 및 실시계획 기간 만료

❍ 2017. 12. 18. : 지형도면 고시 용역 시행

□ 향후계획

❍ 개발계획 및 실시계획 승인 취소로 당초 용도지역으로 환원 고시

❍ 관리지역 세분화는 군 관리계획 재정비시 변경고시

□ 문제점

❍ 개발계획 및 실시계획에 따른 사업부지내 토지소유자 재산권행사 제한에 따른 민원발생 및 행정신뢰도 저하

1

5

개발촉진지구 함양리조트 개발사업

지역발전담당 ☏ 5221

일반계속사업

산악형 힐링관광지와 골프장 조성으로 지역발전을 유도

□ 사업개요

❍ 사업기간

- 1공구(체육시설) : 2008.1 ~ 2017. 12. 31

- 2공구(관광휴양시설) : 2008. 1 ~ 2018. 12. 31

❍ 위치/면적 :  서상면 대남리 일원 / 1,052,251.1㎡

❍ 사 업 비  :  680억원(민자)

❍ 도입시설  :  골프장, 클럽하우스, 숙박시설 등

❍ 사업진도  :  90%(골프장 체육시설은 조건부등록, 숙박시설 미완공)

□ 추진경과

❍ 2006. 8. 11. : 함양리조트 개발사업 시행자 지정고시(함양군)

❍ 2008. 1.  9. : 실시계획 승인고시(함양군 고시 제2008-2호)

❍ 2011. 9. 21. : 체육시설 조건부 등록 수리(경상남도지사)

❍ 2014. 2.  3. : 회원운영위원회의 ㈜함양리조트 기업회생 신청

❍ 2014. 4. 23. : 기업회생절차 개시결정(관리인 :(주)함양리조트 이정규 )

❍ 2015. 8. 13. : 본계약체결 (주)경남관광호텔 210억

❍ 2015. 10.19. : 법원 회생계획안 인가

❍ 2016. 5. 23. : 회원채권 변제완료(공탁 및 현금지급)

❍ 2016.12.29. : 개발계획 및 사업구역 변경 경남도 고시( ~ 2017. 12. 31)

❍ 2017.  2. 17 : 실시계획 변경승인고시(대중제 18홀)

❍ 2017.  5. 24 : 실시계획 변경승인고시

(시행자변경 : 이정규→ (주)경남관광호텔 김점판,김애경)

❍ 2017. 11. 30. : 개발·실시계획변경 및 지형도면 고시(공구분할)

❍ 2017. 12. 28. : 함양리조트 개발사업(1공구) 준공인가

□ 향후계획

❍ 2018. 12. 31 : 숙박시설(콘도)을 완공하여 전체 준공

❍ 공공시설(도로, 공원 등) 기부채납