상 하 수 도 사 업 소

Ⅰ. 2019 업무추진 방향	445

Ⅱ. 2019 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 수동지구 농어촌생활용수 개발사업	449

□ 함양군 마을하수도 확충사업	450

□ 함양군 수도시설 기술진단	451

2. 일반계속사업

□ 광역마을상수도(유림지구) 설치사업	452

□ 마을상수도 운영 및 정비사업	453

□ 함양군 지방상수도 현대화사업	454

□ 병곡지구 농어촌지방상수도 확충사업	455

□ 지곡지구 농어촌지방상수도 확충사업	456

□ 함양군 마을하수도 확충사업	457

□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영	459

Ⅰ		2019 업무추진 방향

항노화의 중심 함양 물 복지 실현

	전략목표
맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성
	단위사업
마을상수도 통합관리 시스템 구축으로 생활용수의 안정적 공급 지방상수도 급수구역 확대로 안정적인 맑은물 공급 지방상수도 현대화사업 추진 하수처리시설 확대 추진 하수관로 정비 BTL사업 운영, 관리

	Ⅱ. 2019 주요업무 계획

1

1

수동지구 농어촌생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 5232

신규사업

❍ 수질악화 및 수량부족으로 생활에 불편을 겪고 있는 수동면 죽산리

일원에 맑고 깨끗한 지방상수도 공급으로 주민 삶의 질 개선

개    요

❍ 위    치 : 함양군 수동면 화산리 ~ 죽산리 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)

❍ 사 업 량 : 송수관로 L = 3.5㎞, 배수관로 L = 10.8㎞, 가압장 2개소

❍ 사 업 비 : 3,508백만원                              (단위 : 백만원)

구 분	합계	2019년	2020년	2021년	비고
합계	3,508	144	1,682	1,682
국비(70%)	2,456		1,228	1,228
군비(30%)	1,052	144	454	454

❍ 급수지역 : 분덕, 도장, 죽전, 외산, 내산, 교항, 바깥치라골, 안치라골

추진계획

❍ 실시설계 : 2019. 3월 ~ 6월

❍ 2020년 국비보조사업 신청 : 2019. 4월

❍ 도로굴착심의 등 행정절차 : 2019. 6월 ~ 12월

❍ 착공 및 준공 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월

기대효과

❍ 수질악화와 수량부족으로 생활불편을 겪고 있는 주민들에게 맑고      깨끗한 지방상수도 공급으로 주민 삶의 질 및 보건위생 향상

1

2

함양군 마을하수도 확충사업

하수도담당 ☏ 5233

신규사업

❍ 마을단위 하수도시설을 정비하여 관내 흐르는 하천오염을 방지

하고 공공수역 수질 및 정주여건 개선

❍ 생활필수기반 하수도시설을 설치·정비하여 주민 삶의 질 향상

사업개요

❍ 위    치 : 휴천면, 안의면 일원 (2개면, 10개 마을, 708여명)

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월(3년간)

❍ 사 업 량

- 휴천면단위하수처리장설치 : 처리장 120㎥/일, 하수관로 10.6㎞

- 성북․황대마을 하수도시설확충 : 하수관로 2.4㎞, 중계펌프장 2개소

❍ 사 업 비 : 13,679백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	합계	2018년	2019년	2020년이후	비고
합계		13,679	50	2,714	10,915
휴천면단위하수처리장설치	국비(70%)	8,175		1,400	6,775
	지방비(30%)	3,504		600	2,904
성북․황대마을 하수도시설확충	국비(70%)	1,400		500	900
	지방비(30%)	600	50	214	336

※ 휴천면 : 백연, 문상, 문하, 한남, 동호, 동강, 원기, 운서

추진계획

❍ 실시설계 추진 : 2019. 1월

❍ 사업인가, 재원협의 : 2019. 6월 ~ 12월

❍ 착공 및 준공 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월

기대효과

❍ 쾌적한 농촌생활 환경 조성으로 군민의 삶의 질과 복지향상에 기여

하고 공공수역의 수질 향상

1

3

함양군 수도시설 기술진단

정수장운영담당 ☏ 5234

신규사업

❍ 수도법 제74조에 의거 5년마다 수도시설에 대한 기술진단 필요

❍ 기술진단결과 보강 및 개선으로 맑고 깨끗한 수돗물 생산에 기여

사업개요

❍ 위    치 : 함양, 안의, 서상정수장

❍ 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2019. 8월

❍ 사 업 량 : 전문기술진단 1개소, 일반기술진단 2개소

❍ 사 업 비 : 360백만원                               (단위 : 백만원)

구분	시설용량	위치	여과방식	이전진단	합계	비고
합계	14,700㎥/일				360
함양	9,000㎥/일	함양읍 대맛길 87-52	급속여과	2014. 8월	160
안의	2,000㎥/일	안의면 금성길 34-50	기계식여과	2014. 8월	80
서상	3,700㎥/일	서상면 상남리 산222	급속여과	-	120	2015년 준공

추진계획

❍ 기술진단 착수 : 2019. 2월

❍ 기술진단 완료 : 2019. 8월

❍ 수도시설 보강 및 개선 : 2020. 1월

기대효과

❍ 지방상수도 유지관리를 통한 맑고 깨끗한 수돗물 안정적으로
공급으로 주민 삶의 향상

❍ 유림지구의 노후된 소규모 수도시설을 통합, 광역마을상수도설치

❍ 맑고 깨끗한 생활용수의 안정적 공급으로 군민 삶의 질 향상

1

1

광역마을상수도(유림지구) 설치사업

관리담당 ☏ 5231

일반계속사업

사업개요

❍ 위    치 : 유림면, 휴천면(13개마을)

❍ 사업기간 : 2017년 ∼ 2021년(5년간)

❍ 사 업 량 : 정수시설 470㎥/일, 취수시설 500㎥/일, 배수시설 V=300㎥
송수관로 L=4.12Km, 배수관로 L=18.61km, 급수관로 L=12.09km

❍  사 업 비 : 10,956백만원                             (단위 : 백만원)

구분	합계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	비고
합계	10,956	857	2,143	1,857	2,858	3,241
국비(70%)	7,669	600	1,500	1,300	2,000	2,269
군비(30%)	3,287	257	643	557	858	972

❍ 급수지역

- 유림면 : 지곡, 손곡, 서주, 우동, 화촌, 장항, 회동, 유평, 옥산, 화암, 창촌, 판문

- 휴천면 : 동호

추진실적

❍ 수도사업 인가 : 2017. 6월

❍ 1차분 착공 및 준공 : 2017. 6월 ~ 12월

❍ 2차분 착공 및 준공 : 2018. 2월 ~ 12월

추진계획

❍ 2019년분 사업 착공 및 준공 : 2019. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 노후된 소규모 수도시설을 통합하여 광역마을상수도 통합관리 시스템을 구축하여 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로서 군민 삶의 질 향상

❍ 인구 노령화에 따른 수질 및 시설운영 전문업체 위탁운영

❍ 누수, 원수부족, 수질불량 시설에 개량 정비로 생활용수를 안정적으로

공급하여 군민 삶의 질 향상

1

2

마을상수도 운영 및 정비사업

관리담당 ☏ 5231

일반계속사업

사업개요

❍ 위    치 : 함양군 일원

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 2,471백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	합계	비고
합계		2,471
마을상수도 운영 및 유지관리	긴급보수 150개소 지하수 사후관리(영향조사) 30개 노후관로 교체 L=2.4㎞ 시설물 유지관리 (수위조절기 30개, 염소투입기 30개,오염방지시설 25개) 마을상수도 한파대책사업(40개소) 농촌형 소방용수 개․보수 34건	750 150 400 300 100 57
소규모 수도시설 개량	소규모 수도시설개량 3개소 L=15km (목현, 마평, 신기)	714

추진계획

❍ 유지관리 : 2019. 1월 ~ 12월

❍ 노후관로 교체 : 2019. 1월 ~ 11월

❍ 수도시설 개량 : 2019. 1월 ~ 11월

❍ 지하수 사후관리 : 2019. 3월 ~ 6월

기대효과

❍ 마을상수도 시설개량 및 유지관리로 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로      공급함으로 군민 삶의 질 향상

1

3

함양군 지방상수도 현대화사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 수도관 부식이 심하여 누수 및 녹물발생이 빈번하고 낮은 유수율로

수도경영 수지악화 및 수돗물 신뢰도 저하로 현대화사업 시급함

❍ 유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적

공급으로 삶의 질 향상

사업개요

❍ 위    치 : 함양읍, 안의면 지방상수도 급수구역 3개소

❍ 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2021. 12월(5년간)

❍ 사 업 량 : 노후상수관로 44.1km 정비, 관망 유지관리시스템 구축
블록시스템 구축 11개소(함양 8, 안의 2, 서상 1)

❍ 사 업 비 : 22,032백만원                           (단위 : 백만원)

구 분	합계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후	비 고
합계	22,032	100	2,643	2,643	5,285	11,361	국비 50% 지방비 50%
국비	11,280		1,586	1,321	2,643	5,730
도비	132			132
군비	10,620	100	1,057	1,190	2,642	5,631

❍ 사업목표 : 유수율 59% → 85%이상 달성

추진실적

❍ 관로ㆍ시설물 전수조사, 관망도 전산화(GIS) : 2017. 9월

❍ 블록시스템 실시설계 및 구축공사  준공 : 2018. 12월

추진계획

❍ 안의면 노후관망 정비공사 착공 및 준공 : 2018. 10월 ~ 2019. 4월

❍ 함양읍 노후관망 정비공사 착공 및 준공 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월

❍ 블록 관망감시 및 유지관리시스템 구축 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월

기대효과

❍ 노후수도관 정비·개량을 통한 맑고 깨끗한 수돗물 안정적으로        공급으로 주민 삶의 질 및 보건위생 향상

1

4

병곡지구 농어촌지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 마을상수도 공급지역인 병곡지구에 지방상수도 공급 ․ 확대를 통한

주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

❍ 가뭄 등 비상사태 발생 시 안정적인 원수확보로 원활한 상수도 공급

사업개요

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 일원

❍ 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2021. 12월

❍ 사 업 량 : 관로 28.2㎞, 배수지 1개소, 가압장 1개소

❍ 사 업 비 : 9,953백만원                              (단위 : 백만원)

구 분	합계	2017년까지	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고
합계	9,953	858	2,143	1,857	2,547	2,548
국비(70%)	6,967	600	1,500	1,300	1,783	1,784
군비(30%)	2,986	258	643	557	764	764

❍ 급수지역 : 송평, 가촌, 휴촌, 덕평, 토내, 소현, 신기, 하대평, 백현, 상대평

추진실적

❍ 수도사업 인가 : 2017. 6월

❍ 1차분 착공 및 준공 : 2017. 6월 ~ 12월

❍ 2차분 착공 및 준공 : 2018. 3월 ~ 12월

추진계획

❍ 2019년분 사업 착공 및 준공 : 2019. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 맑고 깨끗한 지방상수도를 안정적으로 공급하여 주민 생활불편 해소와
보건위생 향상 기대

1

5

지곡지구 농어촌지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

❍ 마을상수도 공급지역인 지곡지구에 지방상수도 공급 ․ 확대를 통한

주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

사업개요

❍ 위    치 : 함양군 지곡면 일원

❍ 사업기간 : 2017. 9월 ~ 2021. 12월

❍ 사 업 량 : 관로 37.9㎞, 가압장 3개소

❍ 사 업 비 : 9,641백만원                                (단위 : 백만원)

구 분	합계	2017년까지	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고
합 계	9,641	1,008	2,143	1,857	2,316	2,317
국비(70%)	6,749	705	1,500	1,300	1,622	1,622
군비(30%)	2,892	303	643	557	694	695

❍ 급수지역 : 오평 외 14개마을(오평, 덕암, 마산, 수여, 봉곡, 중방,
시목, 창촌, 백일, 거평, 주암, 계곡, 금호, 상백, 내백)

추진실적

❍ 수도사업 인가 : 2017. 8월

❍ 1차분 착공 및 준공 : 2017. 9월 ~ 12월

❍ 2차분 착공 및 준공 : 2018. 2월 ~ 12월

추진계획

❍ 2019년분 사업 착공 및 준공 : 2019. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 맑고 깨끗한 지방상수도를 안정적으로 공급하여 주민 생활불편 해소와
보건위생 향상 기대

1

6

함양군 마을하수도 확충사업

하수도담당 ☏ 5233

일반계속사업

❍ 마을단위 하수도시설을 정비하여 물 자원의 효율적 운용관리로

공공수역 수질 및 정주여건 개선

❍ 생활필수기반 하수도시설을 설치·정비하여 주민 삶의 질 향상

사업개요

❍ 위    치 : 마천면 외 4개소(마천·유림·안의·백전·병곡면 일원)

(5개 면, 20개 마을, 2,036명)

❍ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2021. 12월 (6년간)

❍ 사 업 량

- 농월정지구 : 처리장 380㎥/일, 하수관로 3.8㎞

- 우동지구 : 처리장 80㎥/일, 하수관로 3.5㎞

- 추성지구 : 처리장 260㎥/일, 하수관로 4.9㎞

- 오천지구 : 처리장 60㎥/일, 하수관로 5.7㎞

- 백무동지구 : 하수관로 2.9㎞, 배수설비 110개소

❍ 사 업 비 : 16,106백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	합계	2018년까지	2019년	2020년이후	비고
합계		16,106	11,139	1,572	3,395
농월정지구 농어촌하수	국비(70%)	2,100		360	1,740
	지방비(30%)	900		154	746
우동지구 농어촌마을	국비(70%)	2,225	2,112	113
	지방비(30%)	954	886	68
추성지구 농어촌마을	국비(70%)	3,376	2,679	279	418
	지방비(30%)	1,447	1,447
오천지구 농어촌마을	국비(70%)	2,147	1,510	255	382
	지방비(30%)	920	866	22	32
백무동지구 하수관로	국비(70%)	1,382	984	321	77
	지방비(30%)	655	655

추진실적

❍ 우동,추성, 오천, 백무동지구 행정절차이행완료 : 2016. 6월

❍ 우동,추성, 오천, 백무동지구 사업착공 : 2016. 6월 ~ 12월

❍ 농월정지구 실시설계 완료 : 2018. 3월

추진계획

❍ 우동, 추성, 오천, 백무동 지구 공사완료 : 2019. 12월

❍ 농월정지구 공사완료 : 2021. 12월

기대효과

❍ 농월정관광단지 등 함양 상수원 수원지역의 악취제거, 수인성 전염병 예방 등으로 공공수역의 수질 향상으로 쾌적한 농촌생활 환경 조성

1

7

하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영

하수도담당 ☏ 5233

일반계속사업

❍ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)이 2017년에 완료되어 보다       효율적으로 하수관로를 유지관리하고 체계적으로 운영하고자 함

사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 일원(운림, 교산, 용평, 백연, 이은리)

❍ 운영기간 : 2017. 9월 ~ 2037. 9월(20년간)

❍ 사 업 량 : BTL사업(관로정비 30.5km, 배수설비 2,719개소) 임대료 1식

❍ 사 업 비 : 60,092백만원                         (단위 : 백만원)

연차별 구 분		합계	2018 이전 (기투자)	2019년	2020년 이후
사업비	합계	60,092	4,686	1,862	67,325
	임 대 료	47,795	3,831	1,371	54,867
	운 영 비	12,297	855	491	12,458
재원	국비	33,457	2,694	703	30,060
	기 금	8,603	592	281	7,730
	군비	18,032	1,400	878	15,754

추진실적

❍ 사업 선정(환경부) : 2012. 4월

❍ 사업시행자 선정 및 실시협약 체결 : 2014. 11월

❍ 실시계획 승인 및 고시 : 2015. 7월

❍ 사업 완료 및 운영사업 착수 : 2017. 9월 ~ 2037. 9월

운영기간

❍ 위탁운영 : 2017. 9월 ~ 2037. 9월(20년)

※ 년간 분기별 평가 후 운영비 차등지급 : 1등급(100%) ~ 5등급(60%)

기대효과

❍ 함양군 하수처리구역 내 하수관로를 분류식으로 정비하여 수질개선과 쾌적한 생활환경을 조성하고 모니터링시스템 구축