체 육 청 소 년 과

Ⅰ. 기본현황	163

Ⅱ. 2020 주요성과	164

Ⅲ. 2021 업무추진 방향	167

Ⅳ. 2021 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 함양 체육도장 건립사업	169

□ 안의 생활체육공원 조성사업	170

□ 수동 전천후 게이트볼장 건립사업	171

□ 공공체육시설 통합관리 시스템 구축	172

□ 재단법인 함양군 장학회 설립 및 운영	173

2. 역점(특수)시책

□ 유림 체육시설 조성사업	174

□ 함양 복합문화도서관 건립	175

□ 다양한 교육프로그램 지원을 통한 지역인재 발굴	176

3. 일반계속사업

□ 체육진흥을 통한 건강한 함양 조성	177

□ 함양스포츠파크 조성사업(2단계)	178

□ 군민과 함께하는 공공체육시설 관리 운영	179

□ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	180

□ 청소년 안전망 운영	181

Ⅰ		기본현황

정․현원

구 분	계	체육청소년과 장	체육진흥 담 당	체육시설 담 당	스포츠마케팅 담 당	교육청소년담 당
정 원	14	1	3	3	4	3
현 원	15	1	3	3	4	4

기   능

구 분	분 장 사 무
체육진흥 담 당	❍ 과 회계 및 일반서무 ❍ 군체육회 등 체육 관련 단체 관리 ❍ 전문체육, 생활체육지도자 지도·관리 ❍ 도민체전, 생활대축전, 군민체육대회 추진 ❍ 전국·도단위 및 협회별·종목별 체육행사 유치, 지원 ❍ 장애인체육, 학교체육 육성 관리
체육시설 담 당	❍ 공공체육시설 확충 및 유지·관리 총괄 ❍ 소규모 체육시설 설치·유지 및 지도점검 ❍ 함양스포츠파크 조성사업 추진 ❍ 체육시설 정비 및 보수
스포츠마케팅 담 당	❍ 국민체육센터(수영장), 볼링장 등 관리 운영 ❍ 체육시설업 신고·등록 및 지도관리 ❍ 스포츠마케팅사업 및 레저사업 발굴 육성 ❍ 전지훈련팀 유치 및 지원 ❍ 체육시설 관리 및 대관, 스포츠 강좌이용권 사업 추진
교육청소년 담 당	❍ (사)함양군장학회 운영 ❍ 도서관 건립 및 운영지도 ❍ 미래인재육성지원사업 ❍ 사립유치원 및 학교 급식 지원 ❍ 청소년 육성계획 및 단체 육성·운영지원 ❍ 청소년 유해환경업소 및 학교 밖 청소년 지도 ❍ 청소년 상담센터 운영지원

Ⅱ		2020 주요성과

스포츠를 통한 군정 위상 강화

❍ 2020함양군수배 전국여자중학교 친선대회 유치 : 7팀, 201명

❍ 2020시즌 동계 전지훈련팀 유치 : 27팀, 567명

스포츠활성화를 위한 공공체육시설 확충

❍ 함양군 볼링장 건립사업(준공)

❍ 함양공설운동장 진입도로 확·포장공사(준공)

❍ 함양스포츠파크 임시주차장 조성사업(준공)

❍ 안의 연암체육관 개보수사업(준공)

❍ 함양스포츠파크 조성사업(1단계 준공)

❍ 유림 체육시설 조성사업(1차분 공사 중)

❍ 백전 전천후 게이트볼장 건립사업(공사 중)

❍ 지곡면 다목적체육관 건립사업(공사 중)

❍ 함양 다목적 테니스장 건립사업(공사 중)

❍ 국가균형발전특별회계 예산확보(국비 2,000백만원)

- 함양스포츠파크 조성사업(2단계) : 800백만원

- 함양 체육도장 건립사업        : 1,200백만원

효율적인 공공체육시설 운영

❍ 추진기간 : 2020년 연중

❍ 수영 강습반 운영 : 7개반 현원 340명 운영중

❍ 장애인 체육 프로그램 개설 : 1개반 개설중

❍ 볼링장 개장 및 운영 : 2020. 6. 23. 개장 후 운영중

❍ 공공체육시설 이용 활성화 : 연중

미래사회를 대비하는 창의 인재 양성

❍ 교육복지 실현

- 찾아가는 면단위 어린이 학습지 지원사업 332명 / 173백만원

- 교복지원사업 265명 / 79백만원

- 교육지원사업(기숙·학력증진 프로그램, 원거리학생지원) 352백만원

- 관내 고등학교 1학년 1학기 무상교육 16백만원

❍ 무상급식 지원 및 지역 우수 농특산물 구매 촉진

- 전면 무상급식 지원 696백만원

- 관내 우수 농특산물 구매 확대 132백만원

- 친환경 쌀 급식 지원 17백만원

안전하고 건강한 청소년 성장 지원

❍ 청소년 지원체계 확대

- 청소년 상담 및 심리검사 진행 : 총 848건 / 98백만원

- 학교 밖 청소년 프로그램 운영 : 97명 / 79백만원

❍ 청소년 보호활동 강화

- 청소년안전망 서비스 : 3,369건 / 81백만원

- 청소년동반자 운영 : 42명 / 21백만원

Ⅲ		2021 업무추진 방향

스포츠활성화와 맞춤형 교육을 통한 건강한 함양 조성

	전략목표
전문, 생활스포츠 활성화로 군민들의 건강한 삶 구현 공공체육시설 확충으로 스포츠 인프라 구축 다양한 교육프로그램 지원을 통한 교육받기 좋은 함양군 조성 건강하고 밝은 청소년 육성
	단위사업
스포츠활성화를 통한 지역 브랜드 이미지 제고 ⇨ 전국 규모 체육경기대회 개최, 전지훈련 유치 체육 기반시설 확충 ⇨ 스포츠 파크, 체육시설 조성 등 맞춤형 프로그램 지원으로 교육환경 제고 및 지역인재 양성 서비스 수요 충족을 위한 현대식 도서관 건립 지역사회 청소년 관련자원과 연계하여 맞춤형 지원

1

1

함양 체육도장 건립사업

체육시설담당 ☏ 4620

신규사업

❍ 생활체육 인프라 구축으로 군민들의 건전한 여가생활 및 전지훈련
유치와 대회 개최를 통한 지역경제 활성화 기여

개    요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 610번지 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 사업내용 : 체육도장(3층 / 연면적 : 987.90㎡) 1동, 주차장 1식

❍ 사 업 비 : 3,093백만원

❍ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2021년		2022년이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	체육도장 건립 및 주차장 조성	3,093	기본 및 실시설계 용역	93	체육도장 건립 및 주차장 조성	3,000	-	-
국 비		1,200		-		1,200		-
도 비		-		-		-		-
군 비		1,893		93		1,800		-

그간 추진현황

❍ 공유재산 심의	: 2019. 9월

❍ 기본 및 실시설계 완료	: 2020. 1월

❍ 체육진흥시설 확충사업 국비(균특)확보	: 2020. 9월

❍ 공유재산 관리계획 수립	: 2020. 10월

추진계획

❍ 공유재산 관리계획 수립	: 2020. 10월

❍ 계약심사 및 건축협의 등 행정절차 진행	: 2021. 1월

❍ 사업 착공	: 2021. 3월

❍ 사업 완료	: 2021. 12월

기대효과

❍ 군민들의 건전한 여가활동을 위한 생활체육 인프라 구축

❍ 전지훈련 유치와 대회개최를 통한 지역경제 활성화 기여

2

안의 생활체육공원 조성사업

체육시설담당 ☏ 4620

신규사업

❍ 건전한 여가활동 및 생활을 위한 생활체육 인프라 구축하여 공공체육을 활용한 지역경제 활성화 기여

개    요

❍ 위    치 : 안의면 금천리 81-8번지 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

❍ 사업규모 : 체육시설 A=23,138㎡

❍ 사업내용 : 다목적구장, 잔디광장, 수변공원, 관리사 1동 등

❍ 사 업 비 : 금5,900백만원(공사비 2,900백만원, 보상금 3,000백만원)

❍ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2021년		2022년이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	다목적구장 잔디광장 수변공원 관리사 1동 등 조성	5,900	타당성조사 및 기본계획수립 용역	-	실시설계 용역	200	부지매입 및 다목적구장, 관리사 1동 등 조성	5,700
국 비		1,080		-		-		1,080
도 비		-		-		-		-
군 비		4,820		-		200		4,620

그간 추진현황

❍ 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료	: 2018.  8월

❍ 공유재산관리계획 수립	: 2020. 10월

추진계획

❍ 실시설계 용역 시행	: 2021. 2월 ~ 12월

❍ 체육진흥시설 확충사업 국비(균특)신청	: 2021. 4월

❍ 실시계획인가(변경) 승인 및 고시	: 2021. 12월

❍ 부지매입 및 사업 착수	: 2022. 1월

❍ 사업 준공	: 2023. 12월

기대효과

❍ 군민들의 건전한 여가활동을 위한 생활체육 인프라 구축

❍ 공공체육을 활용한 지역경제 활성화 기여

3

수동 전천후 게이트볼장 건립사업

체육시설담당 ☏ 4620

신규사업

❍ 사계절 전천후 사용으로 게이트볼 회원들의 건강한 여가활동 및 삶의 질 향상 및 게이트볼 활성화 기여

개    요

❍ 위    치 : 수동면 화산리 1177-2번지 일원

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

❍ 사업규모 : 체육시설 A=4,615㎡

❍ 사업내용 : 전천후 게이트볼장 1동, 주차장 등

❍ 사 업 비 : 금1,900백만원(공사비 1,500백만원, 보상금 400백만원)

❍ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2021년		2022년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	전천후 게이트볼장,주차장 조성	1,900	-	-	실시설계 용역	100	부지매입 및 전천후 게이트볼장,주차장 조성	1,800
국 비		560		-		-		560
도 비		-		-		-		-
군 비		1,340		-		100		1,240

그간 추진현황

❍ 게이트볼장 건립대상지 선정(수동면)	: 2020. 5월

❍ 공유재산관리계획 수립	: 2020. 10월

추진계획

❍ 실시설계 용역 시행	: 2021. 2월 ~ 12월

❍ 체육진흥시설 확충사업 국비(균특)신청	: 2021. 4월

❍ 행정절차이행(농지, 건축협의 등)	: 2021. 12월

❍ 부지매입 및 사업 착수	: 2022. 1월

❍ 사업 준공	: 2022. 12월

기대효과

❍ 군민들의 건전한 여가활동을 위한 생활체육 인프라 구축

❍ 공공체육을 활용한 지역경제 활성화 기여

1

4

공공체육시설 통합관리 시스템 구축

스포츠마케팅담당 ☏ 4630

신규사업

❍ 건전한 여가활동 및 체력증진을 위한 생활체육 인프라 구축으로
공공체육시설 활성화를 통한 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화

사업개요

❍ 사업내용 : 공공체육시설 통합관리시스템 구축

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 50백만원

❍ 사업내용 : 공공체육시설 통합관리(예약, 정보제공 등) 시스템 구축

- 군 관리 주요 공공체육시설(14개소)은 시설정보 및 예약 서비스 제공

- 읍면 관리 체육시설(42개소)은 시설정보 및 사용방법 안내

❍ 공공체육시설 읍면별 현황

합계	함양	마천	휴천	유림	수동	지곡	안의	서하	서상	백전	병곡
56	15	4	5	3	5	2	8	6	2	4	2

추진계획

❍ 공공체육시설 56개소 자료수집	: 2021. 2월한

❍ 통합관리시스템 구축	: 2021. 6월한

❍ 시스템 운영	: 2021. 6월

기대효과

❍ 통합관리시스템 운영을 통한 공공체육시설 관리 효율성 증대 및 온라인 홍보효과 극대화

❍ 체육시설 예약 및 정보의 투명성 제고를 통한 이용률 제고

1

5

재단법인 함양군 장학회 설립 및 운영

교육청소년담당 ☏ 4640

신규사업

❍ 민법상 사단법인 지자체 출자·출연 불가에 따른 재단법인 전환

❍ 국가 및 지역사회 발전에 기여할 수 있는 지역인재 발굴 양성

개    요

❍ 추진기간 : 2020. 9월 ~ 2022. 7월

❍ 설립시기 : 2022. 7월(예정)

❍ 설립형태 : 재단법인(출연기관)

❍ 출 연 금 : 300백만원(기본재산 200백만원, 보통재산 100백만원)

※(사)함양군장학회 현보유액 : 4,030백만원 – 재단법인 설립 후 함양군 귀속

추진계획

❍ 그간추진상황 : (사)함양군장학회 정관변경 및 재단법인 설립계획 수립

❍ 1차 사전협의(경상남도)	: 2020. 10월

❍ 타당성 검토 용역 실시 및 추진위원회 구성	: 2021. 5월 ~ 2021. 12월

❍ 타당성 검토 결과 공개 및 주민의견 수렴	: 2022. 1월

❍ 출자․출연기관 운영심의위원회 심의․의결	: 2022. 2월

❍ 조례 제정(안) 마련 및 설립협의(경상남도)	: 2022. 2월 ~ 3월

❍ 경남도 협의결과 공개 및 조례ㆍ정관 제정	: 2022. 3월 ~ 5월

❍ 재단 설립(임원공모 및 정관, 제규정 제정 등)	: 2022. 5월 ~ 6월

❍ 설립등기 및 고시 신청	: 2022. 7월

기대효과

❍ 지역 교육 경쟁력 강화로 지역 인재 적극 육성

❍ 장학 사업 다양화로 수요 혜택 확대 및 교육 복지에 대한 사각지대 해소

1

1

유림 체육시설 조성사업

체육시설담당 ☏ 4620

역점 및 특수시책

❍ 건강한 여가활동과 군민 건강향상을 위한 생활체육 인프라 구축

❍ 공공체육 인프라 구축으로 지역경제 활성화 기여

개    요

❍ 위    치 : 유림면 화촌리 305번지 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월

❍ 사업규모 : 6,938㎡

❍ 사업내용 : 다목적체육관 1동, 다목적구장 1면, 조경 및 주차장 등

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 1,000, 도비 200, 군비 3,800)

❍ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합 계		기투자		2021년		2022년이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	다목적체육관 1동, 다목적구장 1면, 조경 및 주차장	5,000	실시설계 용역, 부지매입, 다목적체육관 1동 건립	3,356	다목적체육관 1동, 다목적구장, 조경 및 주차장 조성	1,644	-	-
국비		1,000		1,000		-		-
도비		200		200		-		-
군비		3,800		2,156		1,644		-

그간 추진현황

❍ 생활체육시설 확충 지원사업 공모선정(국비 10억원)	: 2019. 3월

❍ 실시설계 용역(건축, 토목) 시행	: 2019. 8월

❍ 편입토지 보상협의(7필지 보상완료)             : 2020. 3월

❍ 행정절차(건축협의, 계약심사 등) 이행 완료         : 2020. 5월

❍ 사업 착공	: 2020. 5월

추진계획

❍ 사업 준공	: 2021. 10월

기대효과

❍ 체육시설 확충으로 지역민 체력증진 및 삶의 질 향상

❍ 주민들의 여가 활용에 따른 건전한 생활체육문화 조성

3

2

함양 복합문화도서관 건립

교육청소년담당 ☏ 4640

역점 및 특수 시책

❍ 도서관 이용객 증가 및 이용자 서비스 수요 충족을 위한 현대식 맞춤형 도서관 건립 필요

사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 1077-4번지 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년

❍ 사업규모 : 부지면적 7,753㎡, 건축연면적 6,200㎡(지하 1층, 지상 3층)

❍ 사 업 비 : 16,770백만원(국비 5,900, 군비 10,870)

※부지매입비 : 25억 정도

추진상황 및 계획

❍ 복합문화도서관 건립 로드맵 수립	: 2019년 10월

❍ 기본계획 및 타당성조사 용역 시행	: 2019년 10월

❍ 함양군의회 간담회	: 2020년 5월

❍ 공유재산 관리계획 수립	: 2021년 3월

❍ 군계획시설 결정 용역	: 2021년 5월

❍ 경상남도 농업·농촌 및 식품산업정책심의회   : 2021년 9월

❍ 토지 보상협의	: 2022년 1월

❍ 생활 SOC 공모사업 신청                     : 2022년 4월

❍ 함양복합문화도서관 건립사업 설계공모        : 2022년 10월

❍ 사업 착공 : 2023년

❍ 사업 완료 : 2025년

문제점

❍ 도서관 건립 부지 내 농업진흥구역 해제에 따른 기간 연장

- 군계획시설 결정 용역 예산(1차 추경) 확보 및 경남도 농정심의회 준비 철저

기대효과

❍ 현대화된 도서관 신축을 통한 최적의 독서환경 제공

❍ 다양한 프로그램 운영으로 군민의 문화수준 향상

1

3

다양한 교육프로그램 지원을 통한 지역인재 발굴

교육청소년담당 ☏ 4640

역점 및 특수시책

❍ 다양한 교육프로그램 지원으로 지역우수인재 발굴

❍ 공정한 장학회 운영을 통한 청렴도 제고 및 미래인재 양성

개    요

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월

❍ 대    상 : 관내 초·중·고등학교 학생

❍ 사 업 비 : 1,358백만원

❍ 내    용 : 어학연수 지원, 학력증진 프로그램지원, 함양군 장학회 운영 등

추진계획

❍ 초 ‧ 중학생 어학연수 지원

- 초중학교 해외 어학연수 지원사업 30명 / 90백만원

- 작은학교 해외 어학연수 지원사업 10명/ 48백만원

- 체험형 합숙 영어캠프 지원 24명 / 30백만원

- 키스비전 연수프로그램 지원 20명

❍ 교육복지 지원 통한 지역인재 양성

- 기숙프로그램, 학력증진프로그램, 원거리고등학생지원 455백만원

- 고등학생 학업 및 취업프로그램 지원 28백만원

- 서민자녀 맞춤형 교육지원 1,000여명 / 200백만원

- 면단위 어린이 대상 찾아가는 학습지 지원 330여명 / 194백만원

- 교복 구입비 지원 590여명 / 177백만원

❍ 지역인재 육성 위한 장학회 운영

- 고등학생(148명) 및 서울대(4명), 다자녀가정(20명) 장학금 154백만원

기대효과

❍ 시대에 발맞춘 다양한 프로그램 운영으로 글로벌 인재 육성

❍ 공정한 장학회 운영으로 장학 기부문화 확산 및 지역인재 양성

1

체육진흥을 통한 건강한 함양 조성

체육진흥담당 ☏ 4610

일반계속사업

❍ 엑스포 기간 중 종목별 전국 대회 유치로 엑스포 활성화 기여

❍ 체육단체 육성 및 대회 지원으로 건강한 스포츠 문화 활성화

각종 체육대회 추진

❍ 전국대회 유치 : 9개 종목

- 여자축구, 테니스, 태권도, 바둑, 마라톤, 탁구, 농구, 게이트볼,
그라운드골프

❍ 경남도민체전, 경남생활대축전, 군민체육대회 : 봄, 가을

❍ 종목별 협회 체육경기대회 개최 : 28회

❍ 전국 및 도단위 각종 대회 참가 : 36회

추진계획

❍ 한국실업테니스연맹전 함양대회 개최	: 2021. 9월

❍ 군민체육대회 및 함양산삼마라톤대회 개최	: 2021. 9월 ~ 10월

❍ 경남생활체육대축전 출전	: 2021. 10월

❍ 각종 개최 경기 보조금 교부	: 연중

※ 엑스포 일정에 맞춘 전국규모 대회 개최로 엑스포 활성화 기여

기대효과

❍ 전국대회 유치를 통한 함양군의 대외적인 이미지 제고

❍ 대회참가자 및 관련 인원 방문을 통한 지역경제 활성화

❍ 체육단체 육성 지원을 통한 체육인 역량 강화

2

함양스포츠파크 조성사업(2단계)

체육시설담당 ☏ 4620

일반계속사업

❍ 건강한 여가활동과 군민 건강향상을 위한 생활체육 인프라 구축

❍ 전지훈련 유치와 대회 개최를 통한 지역경제 활성화 기여

개    요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 610번지 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2024. 12월

❍ 면    적 : 체육시설 A=210,480㎡

❍ 사업내용 : 궁도장, 다목적체육관, 야구장, 골프연습장 등

❍ 사 업 비 : 18,800백만원(국비 7,520, 지방비 11,280)

❍ 연도별 투자계획                                  (단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2021년		2022년이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	궁도장, 다목적체육관 1동, 야구장, 골프연습장	18,800	실시설계용역	2,573	궁도장, 다목적체육관 1동 건립	4,000	궁도장, 다목적 체육관 1동, 야구장, 골프연습장	12,227
국 비		7,520		1,029		1,600		4,891
도 비		-		-		-		-
군 비		11,280		1,544		2,400		7,336

그간 추진현황

❍ 지방재정투자심사 조건부 승인(사업비 188억원)	: 2019. 6월

❍ 2020년 체육진흥시설지원(균특) 사업비 확보	: 2019. 9월

추진계획

❍ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2020. 11월

❍ 기본 및 실시설계용역 완료	: 2021. 7월

❍ 행정절차(계약심사, 건축협의 등) 이행	: 2021. 8월

❍ 스포츠파크 조성사업(2단계) 착공	: 2021. 9월

❍ 스포츠파크 조성사업(2단계) 준공	: 2024. 12월

기대효과

❍ 지역주민의 다양한 생활체육활동 기회 제공으로 건강한 여가활동
및 삶의 질 향상 도모

❍ 전지훈련 유치와 대회 개최를 통한 지역경제 활성화 및 함양군
대외 이미지 선양에 기여

3

군민과 함께하는 공공체육시설 관리 운영

스포츠마케팅담당 ☏ 4630

일반계속사업

❍ 공공체육시설의 체계적이고 효율적인 관리 및 운영으로 군민
삶의 질 향상과 건강 증진에 기여

❍ 군민들에게 운동기회 제공 확대로 살기 좋은 함양건설

사업개요

❍ 사업내용 : 군 관리 공공체육시설 관리 및 운영 14개소

- 함양공설운동장 : 10개소[공설운동장, 고운체육관, 게이트볼장, 탁구장, 궁도장,
국민체육센터(수영장, 헬스장), 볼링장, 테니스장, 축구장, 족구장]

- 스포츠파크 3개소(축구장 2, 전천후족구장) 및 연암체육관 1개소

❍ 사업기간 : 연중

❍ 사 업 비 : 1,387백만원

❍ 사업내용

- 공공체육시설 운영관리 389백만원

- 국민체육센터 운영관리 682백만원

- 함양군볼링장 운영관리 316백만원

추진계획

❍ 공공체육시설 예약·관리 홈페이지 구축	: 2021. 1월 ~ 6월

❍ 국민체육센터·볼링장 프로그램 운영	: 2021. 1월 ~ 12월

❍ 시설물 연중 관리 및 운영	: 2021. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 군민들의 건강증진을 통하여 건강한 삶을 추구하는 행복도시 구현

❍ 공공체육시설을 활용한 전국단위 훈련 팀 유치로 지역경제 활성화에 기여

4

스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

스포츠마케팅담당 ☏ 4630

일반계속사업

❍ 볼링장, 수영장 등 체육기반시설을 적극 활용한 스포츠마케팅 활성화

❍ 전국단위 전지훈련 유치로 지역경제 활성화에 기여

사업개요

❍ 사업내용 : 전국단위 전지훈련팀 유치(5종목 50팀 1,200명)

※ 축구, 테니스, 검도, 태권도, 농구

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2021. 12월

❍ 사 업 비 : 80백만원

❍ 이용시설 : 군 관리 공공체육시설 14개소

- 함양공설운동장 : 10개소[공설운동장, 고운체육관, 게이트볼장, 탁구장, 궁도장,
국민체육센터(수영장, 헬스장), 볼링장, 테니스장, 축구장, 족구장]

- 스포츠파크 3개소(축구장 2, 전천후족구장) 및 연암체육관 1개소

❍ 지원내용 : 방문 스포츠팀 관련체육시설 무료사용, 볼링장, 헬스장 등 공공 체육시설 제한적 무료 사용 허가 등

추진계획

❍ 체육시설 상시 점검 및 유지보수	: 수시

❍ 전지훈련 유치 홍보	: 2020. 12월 한

❍ 동계훈련 유치	: 2021. 1월 ~ 3월, 11월 ~ 12월

❍ 하계훈련 유치	: 2021. 5월 ~ 9월

기대효과

❍ 스포츠마케팅 활동 강화로 지역경제 활성화에 기여

❍ 참여 팀을 대상으로 한 관광 마케팅 및 엑스포 홍보를 통한 대외 함양 이미지 제고

5

청소년 안전망 운영

교육청소년담당 ☏ 4640

일반계속사업

❍ 지역사회 내 청소년 관련 자원을 연계하여 학업중단, 가출, 인터넷
중독 등 위기청소년에 대한 상담‧보호ㆍ교육 등 맞춤형 서비스 제공

현    황

(단위 : 명)

총 인구수			청소년 인구수(9세~24세)
계	남	여	계	남	여	청소년비율
39,076	18,849	20,227	4,919	2,647	2,272	12.6%

추진계획

❍ 위기청소년 조기 발견ㆍ보호 및 지원을 위한 활동 지원

❍ 상담전화(청소년전화 1388) 운영 : 2021. 1월 ~ 12월, 400건 지원

❍ 청소년에 대한 상담, 교육, 문화체험 등 지원 : 1,000명 / 10백만원

❍ 청소년안전망 운영위원회 운영지원, 실행위원회 운영, 필수연계기관 상호연계 및 협력 : 3백만원

- 필수연계기관 14개 기관, 운영위원회(15명) 2회, 실행위원회(15명) 4회 개최

❍ 1388찾아가는 상담서비스‘아웃리치’를 통한 위기청소년 발굴

- 홍보 및 상담서비스 심리검사 등 2,000명 지원, 위기청소년 10명 발굴

❍ 지역사회 내 긴급 상황 발생 시 대응체계 확립 : 2021. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 사례회의 분과위원회를 통해 위기청소년 및 가족에게 맞춤형 서비스 제공

❍ 프로그램 연계활성화로 위기청소년에 대한 사례관리 질적 향상 도모