◈ 별첨 4. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

지리산생태체험단지 조성사업

담당자

문화관광과 홍영수(☎960-5163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지리산권 동·식물 생태체험 및 학습공간을 조성하여 관광객의 휴식과

체험공간으로 활용, 지역경제 활성화 및 관광시너지 효과 제고

□ 사업개요

○ 기  간 : 2008년 ~ 2017년

○ 위  치 : 함양군 마천면 강청리 일원

○ 규  모 : 66,818㎡(자연사관, 생태관, 산약초공원, 갈대숲, 주차장 및 관리사 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,704백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	18,704	9,380	600	993	7,731
국 비	7,024	2,599	300	350	3,775
시 도 비	2,108	780	90	105	1,133
시군구비	9,572	6,001	210	538	2,823

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 47%)

○ 2006. 12월 : 지리산권 관광개발계획 수립

○ 2009.  9월 : 기본계획 용역 완료

○ 2010.  1월 ~ 12월 : 군계획시설 결정

○ 2011.  7월 ~ 2013. 2월 : 실시설계

○ 2013. 12월 : 공사착공

□ 향후계획

○ 2017. 12월 : 생태체험 전시시설, 단지 내 기반시설 전체분 등 완료

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	사 유	비 고
총사업비	15,004백만원	18,704백만원	토지보상금 군 자체예산 사업총액 포함 관리

사업명

상림주변 관광개발사업

담당자

문화관광과 이성욱(☎960-5163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천년의 숲 상림공원 주변에 대한 관광인프라 확충으로 볼거리

제공 및 관광편의시설 확보로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2019년

○ 위 치 : 함양읍 대덕리 일원

○ 규 모 : 43,888㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	14,000	364	607	3,275	9,754
국 비	4,999	122	-	-	4,877
시 도 비	1,500	37	-	-	1,463
시군구비	7,501	205	607	3,275	3,414

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2005. 12월 : 기본계획 수립

○ 2015.  2월 : 공원 시설결정 및 조성계획

□ 향후계획

○ 2015. 10월 : 환경영향평가

○ 2015. 10월 : 교통영향평가

○ 2016.  1월 : 공사착공

□ 사업변경 내역

구분	변경내용	변경사유
당초	사업기간 : 2008~2016, 사업비 : 126억원 사업규모 : 207,327㎡	농림부 농업진흥구역 일부해제
현재	사업기간 : 2009~2019, 사업비 : 140억원 사업규모 : 43,888㎡

사업명

함양국민체육센터 건립

담당자

문화관광과 김영진(☎960-5165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민 스포츠 수요 증가에 따른 양질의 스포츠 서비스 제공

○ 실내 운동시설 부족 불편 해소 및 군민의 건강 증진과 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2014년

○ 위 치 : 함양군 함양읍 삼휴길 60-40

○ 규 모 : 연면적 2,768.86㎡(지상2층, 지하1층), 수영장(25m×6레인) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,500	5,024	1,476	-	-
국 비	3,200	2,462	738	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,300	2,562	738	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2009.  3월 : 지방재정투융자심사 및 중기지방재정계획

○ 2011.  5월 : 기본 및 실시계획용역

○ 2011. 12월 : 공사착공

○ 2014.  4월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

구분	변경내용	변경사유
당초	사업기간 : 2010~2011, 사업비 : 47억원 사업규모 : 1,867㎡	국민체육기금 지원사업으로 확정됨에 따라 수영장 기본형 규모로 변경추진
현재	사업기간 : 2011~2014, 사업비 : 65억원 사업규모 : 2,768.86㎡

사업명

고운 최치원선생 사당 조성사업

담당자

문화관광과 구병로(☎960-5163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고운 최치원 선생의 학문과 사상 등을 이해할 수 있는 학습의 장을 마련하고,

상림 숲 조성의 애민정신을 스토리텔링화하여 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2016년

○ 위 치 : 함양군 함양읍 교산리 지내

○ 규 모 : 부지면적 18,521㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,156백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,156	706	2,258	1,712	480
국 비	1,450	10	840	360	240
시 도 비	435	3	252	108	72
시군구비	3,271	693	1,166	1,244	168

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2008.  1월 : 기본계획 수립

○ 2011. 12월 : 군관리계획(역사공원) 결정 및 지형도면 승인 고시

○ 2013.  9월 : 실시계획 인가 고시

○ 2013. 12월 : 공사 총괄(토목,건축,기계) 발주

○ 2014. 11월 : 차별화된 사업 추진을 위해 시공 중지

○ 2015.  7월 : 사업(변경) 실시설계(건축) 완료 및 실시설계(토목) 발주

□ 향후계획

○ 2015. 10월 : 사당(기념관) 및 역사사료관 착공 예정

○ 2016.  7월 : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

구분	변경내용	변경사유
당초	사업기간 : 2008~2014, 사업비 : 39억원	차별화된 사업 추진을 위한 공사비 및 추가 토지매입비 증가
현재	사업기간 : 2008~2016, 사업비 : 52억원

사업명

사근산성 순국선열 추모사당 건립

담당자

문화관광과 조재호(☎960-5162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고려말기 왜구 침략 시 순절한 호국영령들의 넋을 기리는 제향공간을

건립하여 충효교육의 장으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위  치 : 함양군 수동면 원평리 산 53-1번지

○ 규  모 : 부지면적 4,985㎡, 추모사당 37.8㎡, 제기고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,150	127	588	1,435	-
국 비	1,000	20	308	672	-
시 도 비	350	7	108	235	-
시군구비	800	100	172	528	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2013. 1월 : 실시설계용역 발주

○ 2014. 4월 : 문화재청 설계승인 완료

○ 2014. 7월 : 사업착공

○ 2015. 5월 : 문화재청 설계변경 승인 완료

○ 2015. 6월 : 설계변경 공사시행

○ 2015. 7월 : 진입도로 정비공사 완료

□ 향후계획

○ 2015. 8월 : 건립비, 추모비 완료

○ 2015. 9월 : 추모사당 공사완료

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	사 유	비고
총사업비	3,000백만원	2,150백만원	건립예정지 기부채납 및 사업규모 축소로 인한 총사업비 감소

사업명

농월정 국민 관광지 정비

담당자

문화관광과 홍영수(☎960-5163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국민들의 여가 활동 증가와 자동차를 이용한 레저활동 증가로 다양한 관광

형태 변화추세에 대응하는 관광지 개발

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위  치 : 함양군 안의면 월림리(농월정) 지내

○ 규  모 : 캠핑장 조성 9,889㎡(오토캠핑장, 캐빈하우스, 관리사 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,000	600	1,000	700	5,700
국 비	4,000	300	500	350	2,850
시 도 비	1,200	90	150	105	855
시군구비	2,800	210	350	245	1,995

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 2012년 ~ 2014년 : 군관리계획 및 조성계획 변경 결정

○ 2013. 12월 : 사업발주 및 착공(토목, 조경, 건축, 전기, 통신)

○ 2014. 12월 : 1차분(2013년분) 공사준공(캠핑장 부지조성 및 캠핑센터 건립)

○ 2015.  6월 : 2차분(2014년분) 공사준공(캐빈하우스 및 관리동 건립)

□ 향후계획

○ 2015. 12월 : 캠핑장 조성 완공

○ 2016년 ~ 2020년 : 농월정 국민관광지 관광기반시설 추진 및 완료

□ 사업변경 내역

구분	당초	현재	사유	비고
사업기간	2013~2016	2013~2020	관광지 조성계획 변경에 따른 사업기간 변경

사업명

함양군 스포츠파크 조성사업

담당자

문화관광과 김영진(☎960-5165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠파크 조성으로 전지훈련팀 및 종목별 전국대회를 유치하고,

군민의 건강증진과 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기  간 : 1단계 : 2012. 1월 ~ 2016. 12월 / 2단계 : 차후

○ 위  치 : 함양군 함양읍 백연리 610번지 일원

○ 규  모 : 205,125㎡ (1단계 : 146,260㎡, 2단계 : 58,865㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	22,100	4,300	2,550	8,400	6,850
국 비	5,800	-	200	2,800	2,800
시 도 비	2,600	-	150	1,300	1,150
시군구비	13,700	4,300	2,200	4,300	2,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014.  4월 : 함양스포츠파크 조성사업 타당성검토 및 기본계획수립 용역

○ 2014. 10월 : 경상남도 투융자심사 재상정(타당성검토 결과 반영)

○ 2015.  1월 : 기본 및 실시설계 용역 실시

□ 향후계획

○ 2015.  9월 ~ 11월 : 실시설계 등 각종 용역사업 완료 및 행정절차이행

○ 2015. 12월 ~ 2016. 12월 : 1단계 사업착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구분	변경전	변경후	사유	비고
규 모	205,795㎡	146,260㎡	규모 과다로 인한 재검토 사업타당성조사로 적정규모 조정
사업비	258억	221억

사업명

상림권 종합주차장 조성사업

담당자

문화관광과 이성욱(☎960-5163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상림주변 주차장 협소로 함양을 방문하는 관광객들의 불편 초래

○ 백연유원지 확장을 통한 관광인프라 구축

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위  치 : 함양군 함양읍 백연유원지 일원

○ 규  모 : 196,450㎡(주차장 35,000㎡, 숙박시설, 푸드존, 오토캠핑장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	23,400	132	500	-	22,768
국 비	6,700	-	-	-	6,700
시 도 비	2,680	-	-	-	2,680
시군구비	14,010	132	500	-	13,378

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2012. 10월 : 군유재산 관리계획 수립

○ 2013.  2월 : 타당성 조사 및 기본계획 용역

○ 2013.  3월 : 군관리계획(변경)결정 및 조성계획(변경) 결정 용역 착수

○ 2014.  6월 : 함양군계획위원회 심의 및 자문(조건부 승인)

○ 2014.  7월 : 경남도 도시계획과 입안 요청

○ 2015.  2월 : 군계획시설결정 및 조성계획 수립

□ 향후계획

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 기본 및 실시설계

○ 2017년 ~ 2019년 : 토지매입

□ 사업변경 내역

구분	변경전	변경후	사유	비고
규 모	35,000㎡	196,450㎡	사업규모 변경에 따른 사업기간 및 사업비 변경
사업비	49억	234억
사업기간	2013~2015	2013~2020

사업명

산양삼가공상품화 및 체험관광육성

담당자

산림녹지과 진병욱(☎960-4457)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산양삼 가공상품화를 통한 부가가치증대 및 6차산업 연계로 지역산업

발전 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 6월 ~ 2015. 12월

○ 위 치 : 함양군 함양읍 일원

○ 규 모 : 산양삼 가공시설 3개소, 산양삼 전시관 1개소, 홍보, 마케팅

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000	580	724	1,696	-
국 비	1,500	300	125	1,075	-
시 도 비	180	36	37	107	-
시군구비	420	84	87	249	-
민간자본	900	160	475	265	-

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 70%)

○ 산양삼 제품개발 및 가공시설 완공

○ 산양삼 생산,가공 및 판매망 구축으로 자립기반 마련

□ 향후계획

○ 산양삼 생산,가공 및 판매망 구축을 통한 자립기반 마련.

○ 산양삼 특화단지 조성을 통한 6차 산업화 지구 육성

사업명

목재문화체험장 조성사업

담당자

산림녹지과 노창탁(☎960-4160)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지구온난화 방지에 기여하는 목재의 중요성을 홍보 및 다양한 문화체험

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2017년

○ 위 치 : 안의면 이전리 468-8번지 일원

○ 규 모 : 건축 1식, 기반공사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,200	125	670	1,250	3,155
국 비	4,160	100	500	1,000	2,560
시 도 비	312	7.5	37.5	75	192
시군구비	728	17.5	132.5	175	403

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1차년도 사업(기반공사) 완료

○ 2차년도 사업 진행 중

□ 향후계획

○ 2015. 12월말 : 2차년도 사업완료

사업명

운서보 소수력 발전사업

담당자

경제과 문영훈(☎960-5184)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임천의 풍부한 하천수를 이용한 전기 생산으로 신규세원 확보

○ 신재생에너지 보급사업 재투자로 정부 정책에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 3. 21. ~ 2014. 9. 15.

○ 위 치 : 휴천면 남호리 운서보 일원

○ 규 모 : 시설용량 400㎾

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,147백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,147	3,147	-	-	-
국 비	1,573.5	1,573.5	-	-	-
시 도 비	472.05	472.05	-	-	-
시군구비	1,101.45	1,101.45	-	-	-

※ 한국농어촌공사 위수탁 사업으로 사업비 2011년 집행완료

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 10. 27. : 완성검사 완료 및 전기사업 개시

□ 향후계획

○ 발전 최적 환경 조성을 통한 운영관리로 전기 판매수익금 확보 최선 및

신재생에너지 보급사업 재투자

사업명

마천면소재지 종합정비사업

담당자

건설교통과 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상 면소재지 거점기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 마천면 가흥리 일원

○ 규 모 : 커뮤니티 센터 조성, 공영주차장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,781백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,781	926	429	2,490	2,936
국 비	4,746	648	300	1,743	2,055
시 도 비	610	68	54	224	264
시군구비	1,425	210	75	523	617

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 마천면 소재지 종합정비사업 기본계획 수립 : 2013. 7월

○ 마천면 소재지 종합정비사업 시행계획 수립 : 2014. 11월

○ 마천면 소재지 종합정비사업 하드웨어 착공 : 2015. 2월

□ 향후계획

○ 하드웨어 1차년도 준공 : 2015. 12월

○ 하드에어 2차년도 준공 : 2016. 12월

사업명

봉전권역 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 서하면 봉전리 일원

○ 규 모 : 전통예절관 조성, 우전문화관 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,247백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	4,247	573	429	1,201	2,044
국 비	2,940	401	300	841	1,398
시 도 비	379	44	47	108	180
시군구비	881	128	82	252	419
기 타	47	-	-	-	47

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 봉전권역 종합정비사업 시행계획 수립 : 2014. 9월

○ 봉전권역 종합정비사업 하드웨어 착공 : 2014. 10월

□ 향후계획

○ 하드웨어 1차년도 준공 : 2015. 12월

○ 하드웨어 2차년도 준공 : 2016. 12월

사업명

지곡면 소재지 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 면소재지 거점기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 지곡면 개평리, 창평리 일원

○ 규 모 : 전선 및 통신선 지중화, 창촌마을복지회관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	6,650	907	429	3,027	2,287
국 비	4,654	635	300	2,119	1,600
시 도 비	599	67	54	272	206
시군구비	1,397	205	75	636	481

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 지곡면 소재지 종합정비사업 시행계획 수립 : 2014. 9월

○ 지곡면 소재지 종합정비사업 하드웨어 착공 : 2014. 10월

□ 향후계획

○ 하드웨어 1차년도 준공 : 2015. 12월

○ 하드에어 2차년도 준공 : 2016. 12월

사업명

죽림권역 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양읍 죽림리 일원

○ 규 모 : 팔령치 교류센터, 마을회관 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,519백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	3,519	-	355	720	2,444
국 비	2,436	-	249	504	1,683
시 도 비	313	-	32	65	216
시군구비	731	-	74	151	506
기 타	39	-	-	-	39

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 죽림권역 종합정비사업 기본계획 수립 : 2014년 10월

□ 향후계획

○ 죽림권역 종합정비사업 시행계획 수립 : 2015. 10월

○ 하드웨어 1차년도 착공 : 2015. 11월

○ 하드웨어 2차년도 준공 : 2017. 12월

사업명

삼동권역 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 병곡면 옥계리 일원

○ 규 모 : 진입로정비, 다목적회관 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,371백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	3,371	-	348	720	2,303
국 비	2,360	-	244	504	1,612
시 도 비	303	-	31	65	207
시군구비	708	-	73	151	484

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 삼동권역 종합정비사업 기본계획 수립 : 2014. 9월

○ 삼동권역 종합정비사업 시행계획 수립 : 2015. 7월

□ 향후계획

○ 하드웨어 1차년도 착공 : 2015. 8월

○ 하드웨어 2차년도 준공 : 2017. 12월

사업명

휴천면 소재지 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 면소재지 거점기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 휴천면 목현리 일원

○ 규 모 : 아토피 힐링 산책로 조성, 게이트볼장 정비, 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,447백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	6,447	-	691	1,450	4,306
국 비	4,514	-	484	1,015	3,015
시 도 비	577	-	62	130	385
시군구비	1,356	-	145	305	906

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 휴천면 소재지 종합정비사업 기본계획 수립 : 2014. 9월

○ 휴천면 소재지 종합정비사업 시행계획 수립 : 2015. 6월

□ 향후계획

○ 하드웨어 1차년도 준공 : 2015. 12월

○ 하드에어 2차년도 준공 : 2016. 12월

○ 하드에어 3차년도 준공 : 2017. 12월

사업명

정개선 농어촌도로 확포장공사

담당자

건설교통과 이성현(☎960-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 중장기 계획에 의한 연차별 사업시행으로 지역 균형개발과

주민소득 증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2015년

○ 위 치 : 함양군 지곡면 평촌리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.66km B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,438백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	2,438	1,120	310	1,008	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,438	1,120	310	1,008	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 실시설계용역 : 2011년

○ 사업 발주 : 2011. 3월~현재

□ 향후계획

○ 사업준공 예정 : 2015년

사업명

함양~국계간 도로확포장공사

담당자

건설교통과 류순미(☎960-4167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 중장기 계획에 의한 연차별 사업시행으로 지역 균형개발과

주민소득 증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위 치 : 함양군 유림면 국계리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.644km B=6.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,059백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	2,059	430	951	678	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,059	430	951	678	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 실시설계용역 : 2013년

○ 사업 발주 : 2013. 12월~현재

□ 향후계획

○ 사업준공 예정 : 2015년

사업명

의탄교 재가설공사

담당자

건설교통과 류순미(☎960-4167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠선계곡이 개방됨에 따른 지리산 관광객 급증으로 의탄교 재가설을

통해 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위 치 : 마천면 의탄리 일원

○ 규 모 : 교량가설 L=115m B=10.5m, 도로포장 L=467m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	4,730	-	4,300	430	-
국 비	500	-	500	-	-
시 도 비	2,000	-	2,000	-	-
시군구비	2,230	-	1800	430	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 : 2011년 ~ 2012년

○ 사업 발주 : 2013. 12월

○ 사업 준공 : 2015. 4월

사업명

동상선 농어촌도로 확포장공사

담당자

건설교통과 이성현(☎960-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 중장기 계획에 의한 연차별 사업시행으로 지역 균형개발과

주민소득 증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위 치 : 함양군 안의면 하원리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.05km B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,264백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	1,264	233	868	163	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,264	233	868	163	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 실시설계용역 : 2013년

○ 사업 발주 : 2013. 12월~현재

□ 향후계획

○ 사업준공 예정 : 2015년

사업명

도천~구라(군도16호선)우회도로 개설사업

담당자

건설교통과 류순미(☎960-4167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 중장기 계획에 의한 연차별 사업시행으로 지역 균형개발과

주민소득 증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양군 병곡면 월암리

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.94km B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,349백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	2,349	-	932	-	1,417
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,349	-	932	-	1417

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계용역 : 2013년 ~ 2014년

○ 사업 발주 : 2014. 11월~현재

□ 향후계획

○ 사업준공 예정 : 2017년

사업명

대방~중기간 도로확포장공사

담당자

건설교통과 류순미(☎960-4167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양군과 장수군의 연결도로로서 영호남 화합을 위한 오랜 숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양군 백전면 운산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.9km B=9.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	7,000	-	3,000	4,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,000	-	2,000	4,000	-
시군구비	1,000	-	1,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계용역 : 2013년 ~ 2014년

○ 사업 발주 : 2014. 10월~

□ 향후계획

○ 사업준공 예정 : 2017년

사업명

서백소하천 재해예방사업

담당자

안전관리과 최정민(☎960-4556)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 반복적인 침수로 수해피해가 있는 지역의 주택지를 보호하고,           근원적인 예방대책을 수립하여 사전재해 예방에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1월 ~ 2016. 12월

○ 위 치 : 함양군 백전면 양백리 일원

○ 규 모 : 소하천정비 L=1.2㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,300	-	400	1,612	1,288
국 비	1,650	-	200	806	644
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,650	-	200	806	644

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2014. 3. 21. : 실시설계 완료

○ 2014. 7. 3. : 사업착공

○ 2014. 11. 26. : 소하천정비 시행계획 공고

□ 향후계획

○ 2015. 12월 : 보상협의완료

○ 2016. 12월 : 사업준공

사업명

교산군계획시설도로(소로1-5호선)개설공사

담당자

도시환경과 임주섭(☎960-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양읍 교산리 일원의 정비되지 않은 마을의 도로를 개설하여 상·하수도

등의 도시정비 시설로 군민들의 오랜 숙원해소와 마을연결로 확·포장으로

교통편의 제공 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 4. 29. ~ 2015. 8. 15

○ 위 치 : 함양읍 교산리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=220m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	1,440	-	817	623	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	220	-	220	-	-
시군구비	1,220	-	597	623	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 보조기층 포설 완료

□ 향후계획

○ 2015년 : 아스콘포장 및 군계획시설사업 공사완료 공고

사업명

환경성질환 예방관리센터 조성사업

담당자

지역발전과 백성진(☎960-4245)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아토피 질환으로 고통받는 환자와 그 가족들의 삶의 질 향상

○ 생태 숲 및 자연휴양림과 연계하여 산림·문화교육과 환경성질환

예방교육을 함께하는 새로운 환경성 질환예방·관리센터 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년(4년간)

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산17번지

○ 규 모 : 교육시설, 치유시설, 주거시설, 놀이시설, 지원시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,000	300	800	2,000	3,900
국 비	3,500	150	400	1.000	1,950
시 도 비	1,225	75	140	350	660
시군구비	2,275	75	260	650	1,290

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2013. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 시행(2015. 8월 완료계획)

○ 2013.12월 : 사업계획 재평가(환경부)

○ 2014.11월 : 기반정비공사 실시설계 완료

○ 2015. 1월 : 기반정비공사 착공

□ 향후계획

○ 2015. 8월 : 환경성질환예방관리센터 건축 설계 완료

○ 2015. 9월 : 건축 공사 착공

사업명

불로장생 산삼휴양밸리 조성사업

담당자

지역발전과 백성진(☎960-4245)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고려삼 원조 지역으로서의 함양군 위상 제고 및 2020년 세계 산삼엑스포

추진을 위한 체계적 기반 조성

○ 함양군의 청정 생태와 신뢰할 수 있는 명품 산양삼을 활용한 체류형

휴양관광단지 조성을 통한 관광활성화 및 지역발전 전략 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산22번지

○ 규 모

- 모노레일 설치 L=3.95㎞

- 하부승강장 건축면적 : 939.52㎡, 3층

- 진입도로 정비공사, 기반정비 및 주차장 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	24,000	3,500	3,750	8,700	8,050
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	20,000	2,000	2,750	7,200	8,050
시군구비	4,000	1,500	1,000	1,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013. 11월 : 진입도로 정비공사 착공 L=1.2㎞

○ 2014.  3월 : 모노레일 제작설치공사 시행 L=1.98㎞ (1차분 준공)

○ 2014.  3월 : 모노레일 승강장 건축공사 착공

□ 향후계획

○ 2015. 10월 : 소규모환경영향평가 완료

○ 2015. 10월 : 도시계획시설 결정 완료

사업명

산림생태문화체험단지 조성사업

담당자

지역발전과 백성진(☎960-4245)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림의 생태․휴양․문화․교육기능 등 산림의 다원적 기능을 종합적으로

체험할 수 있는 복합휴양단지를 조성하여, 산림보전과 군민의 정서함양,

체험학습 등을 통해 지역경제 발전과 휴양관광의 거점공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2017년(5년)

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리 산 1번지 일원

○ 규 모 : 산림생태 문화체험관, 진입도로 정비, 산림레포츠시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	27,000	1,000	4,600	4,000	17,400
국 비	13,500	500	1,500	2,000	9,500
시 도 비	4,050	150	450	600	2,850
시군구비	9,450	350	2,650	1,400	5,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2014. 5월 : 진입도로 정비공사 착공

○ 2015. 4월 : 자연휴양림 지정고시 완료

○ 2015. 5월 : 기반조성공사 착공

□ 향후계획

○ 2016년 상반기 건축공사 착공계획이며, 2017년 계속사업으로 조기 완공

될 수 있도록 추진

사업명

치유의 숲 조성사업

담당자

지역발전과 백성진(☎960-4245)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림을 통하여 몸과 마음을 치유하는 복합형 체험시설조성

○ 대단위 산림복합경영단지, 산삼휴양밸리조성사업, 생태숲, 환경성질환 예방

관리센터와 연계한 다양한 체험프로그램 개발로 일자리창출 및 군민 소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년(4년)

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산 1번지 일원

○ 규 모 : 65ha, 치유센터 1동, 모험놀이 숲 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,000	300	600	1,200	2,900
국 비	2,500	150	300	600	1,450
시 도 비	750	45	90	180	435
시군구비	1,750	95	210	420	1,025

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2014. 1월 : 기본계획 및 실시설계 완료

○ 2014. 3월 : 기반정비공사 착공(1차분 준공)

○ 2014. 3월 : 모험놀이 숲 착공(1차분 준공)

○ 2015. 2월 : 치유센터 건축공사 착공(치유센터 골조공사 진행 중)

□ 향후계획

○ 2016년 상반기 치유센터 건축공사, 기반공사, 모험놀이 숲 준공

사업명

돈육가공품의 제조․가공 유통시설 지원사업

담당자

농축산과 박진곤(☎ 960-4225)

□ 사업목적 및 필요성

○ FTA타결로 어려운 양돈농가에 제조․가공․유통․체험 등 통한 다양한 소비

확대로 양돈농가 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2015년

○ 위 치 : 함양읍 운림리 340-2

○ 규 모 : 건축물 1,275.55㎡(제조․가공 유통판매시설 각1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,853백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,853	-	64	2,789	-
국 비	1,360	-	32	1,328	-
시 도 비	163	-	3.8	159.2	-
시군구비	381	-	8.9	372.1	-
민간자본	949	-	19.3	929.7	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 콘크리트 건축물, 지붕, 배선공사 완료, 벽채공사와 내부인테리어 및 기계시설       설치중이며, 11월중으로 완료예정임.

□ 향후계획

○ 다양한 돈육 제품개발로 비선호 부위 소비확대로 안정적인 소득증대

○ 제조․가공․유통․체험 등을 통한 소비확대와 서구화된 식생활문화 충족

사업명

물레방아골 광역친환견경농업단지조성사법

담당자

작물지원과김종업(☎960-4619)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업환경개선과 친환경농업 육성을 위해 경종과 축산을 연계

○ 자원순환형 친환경 농업단지 조성으로 저비용. 고효율 친환경농업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2014년

○ 위 치 : 함양군 함양읍 한들로 121

○ 규 모 : 농축순환자원화센터외 4개분야 7종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,546백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,546	5,585	3,961	-	-
국 비	2,752	1,675	1,077	-	-
시 도 비	1,375	837	538	-	-
시군구비	3,209	1,955	1,254	-	-
민간자본	2,210	1,118	1,092	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 퇴비생산시설 3,478㎡, 친환경공동육묘장 2,737㎡, 건조저장시설 243㎡

○ 친환경농산물유통시설 2,090㎡, 교육시설 421㎡, 광역방제기 1대

□ 향후계획

○ 각종 시설장비에 안전사용지도 및 활용도 방안 모색

○ 친환경농업 육성을 위한 컨설팅 및 교육 실시

□ 사업변경 내역

사업명	당 초		변 경		비 고
계		9,100		9,546
왕겨자원화시설	330㎡	530	337㎡	399
광역살포기	1대	200	1대	198
친환경벼 공동육묘장	1,980㎡	555	2,737㎡	1,098
농축순환자원화센터	30톤	3,625	3,504㎡	3,436
미생물배양시설	1식	345			취소
친환경벼건조저장시설	2기	800	2기	1,427
친환경농산물유통시설	2,146㎡	2,025	2,090㎡	2,125
교육시설	429㎡	520	421㎡	510
설계. 감리비	6식	500	1식	353

사업명

함양곶감 생산유통 활성화사업

담당자

작물지원과 라상우(☎960-4166)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새로운 소득작목 육성을 위한 현대화된 생산시설 필요

○ 2011년 8월 지리적표시 제39호로 등록한 함양 곶감의 생산유통 활성화

○ 농가소득 안정적 증대 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양군 일원

○ 규 모 : 곶감 저온저장시설 4,125㎡외 6종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,000	250	600	1,000	3.150
국 비	2,500	125	300	500	1,575
시 도 비	500	15	36	60	389
시군구비	500	35	84	140	241
민간자본	1,500	75	180	300	945

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2013년 ~ 2014년 사업계획에 의거 사업 완료되었음

○ 2015년도 신청자 접수를 통한 대상자 선정 사업추진 중에 있음

□ 향후계획

○ 전업농 육성 및 시설현대화로 고품질 곶감생산의 기반을 마련

○ 연차별 투자계획에 의거 곶감생산 활성화를 통한 농가소득 증대

사업명

함양공공하수처리시설 증설사업

담당자

상하수도사업소 김동수(☎960-4061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4대강 중점관리 구역 내 하수처리시설에 대한 방류수 수질기준 강화 및

생활수준 향상에 따른 하수발생량 증가 대비

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 12월 ~ 2015. 11월

○ 위 치 : 함양읍 용평리(하수처리장)

○ 규 모 : 시설용량 증설 2,600㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,100	3,062	3,338	700	-
국 비	2,598	1,190	1,408	-	-
시 도 비	520	238	282	-	-
시군구비	3,982	1,634	1,648	700	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2013. 9월 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2013. 9월 : 사업인가 및 재원협의 완료

○ 2013. 12월 : 사업시행

□ 향후계획

○ 2015. 9월 : 사업준공