별첨 4. 개별 투자심사 사업의 추진현황

		2016년 함양군 재정공시(결산)

사업명

고운 최치원선생 사당 조성사업

담당자

문화관광과 정윤화(☎960-5164)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고운 최치원 선생의 학문과 사상 등을 이해할 수 있는 학습의 장을 마련하고,

상림 숲 조성의 애민정신을 스토리텔링화하여 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2016년

○ 위 치 : 함양군 함양읍 교산리 지내

○ 규 모 : 부지면적 18,521㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,156백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,156	2,964	1,712	480
국 비	1,450	850	360	240
시 도 비	435	255	108	72
시군구비	3,271	1,859	1,244	168
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2008.  1월 : 기본계획 수립

○ 2011. 12월 : 군관리계획(역사공원) 결정 및 지형도면 승인 고시

○ 2013.  9월 : 실시계획 인가 고시

○ 2013. 12월 : 공사 총괄(토목,건축,기계) 발주

○ 2015.  7월 : 사업(변경) 실시설계(건축) 완료 및 실시설계(토목) 발주

○ 2016.  5월 : 사당조성 토목공사 발주

○ 2016.  6월 : 사당(전시관, 사료관) 추가사업 발주

□ 향후계획

○ 2016. 11월 : 사당건립 완료

○ 2017. 12월 : 전체공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	변경내용	변경사유
당초	사업기간 : 2008~2014, 사업비 : 39억원	차별화된 사업 추진을 위한 공사비 및 추가 토지매입비 증가
현재	사업기간 : 2008~2016, 사업비 : 52억원

사업명

불로장생 산삼휴양밸리 조성

담당자

지역발전과 김학양(☎960-4141)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청정 함양 산양삼을 산악관광과 접목시켜 휴양치유 복합관광 단지를 조성함으로써 산촌지역의 새로운 경영수익사업 모델 창출

○ 2020 함양산삼항노화엑스포 거점단지로 경남미래 50년 발전의 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산22번지 일원

○ 규 모

- 모노레일 설치 L=3.95Km, 상․하부 승강장 1,263.69㎡(3층, 건축면적 939.52㎡)

- 진입도로 정비 L=2.5Km, 주차장 및 기반정비 A=52,400㎡(507대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	25,000	7,250	3,500	3,000	11,250
국 비	0	-
시 도 비	20,000	4,750	2,000	2,000	11,250
시군구비	5,000	2,500	1,500	1,000	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2013. 06. : 경남미래 50년 전략사업 선정

○ 2013. 12. : 진입도로 정비공사(대봉교~하부승강장) ⇒ 준공(’15. 12.)

○  2014. 03. : 모노레일 하부승강장 설치공사 착공

○  2015. 02. : 진입도로 정비공사(주차장~대봉교) 착공

○  2015. 03. : 주차장 및 기반정비공사 착공

□ 향후계획

○ 2017. 01. : 모노레일 제작 및 설치(우안)

○ 2017. 12. : 최종 준공(임시운영 2018.1.~6.)

○ 2018. 07. : 전면 개장

사업명

농월정 국민 관광지 정비

담당자

문화관광과 문성용(☎960-5163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국민들의 여가 활동 증가와 자동차를 이용한 레저활동 증가로 다양한 관광

형태 변화추세에 대응하는 관광지 개발

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위  치 : 함양군 안의면 월림리(농월정) 지내

○ 규  모 : 캠핑장 조성 9,889㎡(오토캠핑장, 캐빈하우스, 관리사 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,000	1,600	700	2,000	3,700
국 비	4,000	800	350	1,000	1,850
시 도 비	1,200	240	105	300	555
시군구비	2,800	560	245	700	1,295
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2012년 ~ 2014년 : 군관리계획 및 조성계획 변경 결정

○ 2013. 12월 : 사업발주 및 착공(토목, 조경, 건축, 전기, 통신)

○ 2014. 12월 : 1차분(2013년분) 공사준공(캠핑장 부지조성 및 캠핑센터 건립)

○ 2015.  6월 : 2차분(2014년분) 공사준공(캐빈하우스 및 관리동 건립)

○ 2016.  3월 : 도로, 주차장, 상하수도 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016.  9월 : 오토캠핑장 조성 준공

○ 2016년 ~ 2020년 : 농월정 국민관광지 관광기반시설 추진 및 완료

□ 사업변경 내역

구분	당초	현재	사유	비고
사업기간	2013~2016	2013~2020	관광지 조성계획 변경에 따른 사업기간 변경

사업명

사근산성 순국선열 추모사당 건립

담당자

문화관광과 박지숙(☎960-4223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고려말기 왜구 침략 시 순절한 호국영령들의 넋을 기리는 제향공간을

건립하여 충효교육의 장으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위  치 : 함양군 수동면 원평리 산 53-1번지

○ 규  모 : 부지면적 4,985㎡, 추모사당 37.8㎡, 제기고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,150	127	588	1,435
국 비	1,000	20	308	672
시 도 비	350	7	108	235
시군구비	800	100	172	528
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013.  1월 : 실시설계용역 발주

○ 2014.  4월 : 문화재청 설계승인 완료

○ 2014.  7월 : 사업착공

○ 2015.  5월 : 문화재청 설계변경 승인 완료

○ 2015.  6월 : 설계변경 공사시행

○ 2015.  7월 : 진입도로 정비공사 완료

○ 2015.  10월 : 건립비, 추모비 완료

○ 2015.  10월 : 추모사당 공사완료

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	사 유	비고
총사업비	3,000백만원	2,150백만원	건립예정지 기부채납 및 사업규모 축소로 인한 총사업비 감소

사업명

남덕유산 주차장 조성사업

담당자

산림녹지과 한송현(☎960-4498)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남더유산 방문객의 도로변 주차로 인한 불편사항 해소 및 편의제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2015(3년간)

○ 위 치 : 함양군 서상면 상남리 1083-1번지외 2필지

○ 규 모 : 주차장(대형 37대, 소형 45대), 화장실, 관리사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   1,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,750	1,571	179
국 비
시 도 비	1,000	993	7
시군구비	750	578	172
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 남덕유산 주차장 시설 및 화장실 시설 설치 완료(2015.2월)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

봉전권역 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016년

○ 위 치 : 서하면 봉전리 일원

○ 규 모 : 전통예절관 조성, 우전문화관 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년도	‘16년도	‘17년도 이후
계	4,200	1,002	1,201	1,997	-
국 비	2,940	701	841	1,398
시 도 비	379	91	108	180
시군구비	881	210	252	419
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기본계획 수립 : 2013년 10월

○ 시행계획 수립 : 2014년 6월

○ 사업 착공 : 2014년 9월 ~

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2016년 12월

사업명

마천면소재지 종합정비사업

담당자

건설교통과 정지영(☎960-4530)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상 면소재지 거점기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016년

○ 위 치 : 마천면 가흥리 일원

○ 규 모 : 커뮤니티 센터 조성, 공영주차장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,781백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년도	‘16년도	‘17년도 이후
계	6,781	1,355	2,490	2,055
국 비	4,746	948	1,743	264
시 도 비	610	122	224	617
시군구비	1,425	285	523
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 기본계획 수립 : 2013년 7월

○ 시행계획 수립 : 2014년 11월

○ 사업 착공 : 2015년 2월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2016년 12월

사업명

지곡면 소재지 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 면소재지 거점기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016년

○ 위 치 : 지곡면 개평리, 창평리 일원

○ 규 모 : 전선 및 통신선 지중화, 창촌마을복지회관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년도	‘16년도	‘17년도 이후
계	6,650	1,336	3,027	2,287
국 비	4,654	935	2,119	1,600
시 도 비	599	121	272	206
시군구비	1,397	280	636	481
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 시행계획 수립 : 2014년 9월

○ 사업 착공 : 2014년 10월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2016년 12월

사업명

산림생태·문화체험 단지 조성

담당자

지역발전과 김학양(☎960-4141)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여가생활 변화에 따른 체류형 산림휴양공간 조성과 모험레포츠 체험시설을 통해 산림자원의 새로운 수익모델 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리 산1 일원

○ 규 모

- 진입도로 확·포장  L=1.81Km, B=11m

- 건축(관리사무소, 단체숙소, 식당, 숲속의 집 등 /

연면적 3,194.38㎡, 건축면적 1,821.45㎡)

- 산림레포츠시설(짚라인, 모험지원센터, 산림모형시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	27,000	4,000	4,000	2,400	16,600
국 비	13,500	2000	2,000	1,200	8,300
시 도 비	4,050	600	600	360	2,490
시군구비	9,450	1,400	1,400	840	5,810
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2014. 05. : 진입도로 정비공사 착공

❍ 2015. 04. : 자연휴양림 지정고시 완료

❍ 2015. 05. : 기반정비공사 착공

❍ 2016. 02. : 자연휴양림 조성계획 승인(경상남도)

□ 향후계획

○ 2017. 01. : 건축공사 착공

○  2018. 12. : 최종 준공

○  2019. 01. ~ 06. : 개장준비 및 임시운영

○  2019. 07. : 전면 개장

사업명

치유의 숲 조성사업

담당자

지역발전과 박중경(☎960-4221)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대봉산 천혜 자연환경을 활용한 자연치유 공간 조성으로 인체의 면역력 향상 및 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산1번지 일원

○ 규 모

- 기반정비공사(계류정비, 체험길 조성, 오수관로매설 등)

- 치유센터(724.49㎡, 2층/ 건축면적 409.57㎡), 요리체험장(1층, 252.56㎡)

- 모험놀이 숲(27종) 조성, 전기‧통신‧소방공사 1식, 감리 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000	900	1,200	1,600	1,300
국 비	2,500	450	600	800	650
시 도 비	750	135	180	240	195
시군구비	1,750	315	420	560	455
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2014. 04. : 치유의숲 조성계획 승인(행정절차 완료)

○ 2014. 04. : 기반정비 공사 착공

○ 2014. 05. : 모험놀이숲공사 착공

○ 2015. 02. : 치유센터 건축공사 착공

□ 향후계획

○ 2017. 01. : 기반정비공사 잔여공사 착공

○ 2017. 01. : 모험놀이숲공사 잔여공사 착공

○ 2017. 06. : 최종 준공

○ 2017. 07. : 전면 개장

사업명

함양 항노화 산업단지 조성사업

〔함양 신관.백천지구 투자유치 예정부지 조성사업)

담당자

경제과 투자유치담당

주무관 신은경(☎960-4733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군내에 공장 설립을 희망하는 기업을 위해 준비된 부지를 적기에 제공할 수      있도록 투자유치 예정부지를 사전 매입하여 기업유치 및 산업단지 조성

○ 기업유치를 통한 고용창출 및 주민소득증대와 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 함양군 함양읍 신관리 산 54-1번지 일원

○ 규 모  - 사 업 량 : 740,586㎡

- 총사업비 : 11,200백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	11,200	9,322	120	283	1,475-
국 비
시 도 비
시군구비	11,200	9,322	120	283	1,475
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2012. 11. : 「개발행위허가 제한 지역」 지정 고시

○ 2014. 6. 23. : 투자유치 협약 체결(도·함양군·(주)애그로닉스)

□ 향후계획

○ 부지 및 지장물(분묘) 보상 지속 추진(토지 52필지, 분묘 125기 등)

○ 투자유치 활동 전개(투자유치설명회·박람회 참가 및 관련기관 방문 홍보)

□ 사업변경 내역

○ 사업명칭 변경 : 2016. 2. 1.

- 함양 제2일반산업단지 조성사업 → 함양 항노화 산업단지

(경상남도 항노화 산업 육성계획과 연계하여 추진코자 명칭 변경)

사업명

죽림권역 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양읍 죽림리 일원

○ 규 모 : 팔령치 교류센터, 마을회관 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,463백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년도	‘16년도	‘17년도 이후
계	3,463	356	720	428	1,959
국 비	2,424	249	504	300	1,371
시 도 비	311	32	65	38	176
시군구비	728	75	151	90	412
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본계획 수립 : 2014년 10월

○ 시행계획 수립 : 2015년 10월

○ 사업 착공 : 2015년 10월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 12월

사업명

삼동권역 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 병곡면 옥계리 일원

○ 규 모 : 진입로정비, 다목적회관 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년도	‘16년도	‘17년도 이후
계	3,395	348	720	1,143	1,184
국 비	2,376	244	504	800	828
시 도 비	306	31	65	103	107
시군구비	713	73	151	240	249
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 수립 : 2014년 9월

○ 시행계획 수립 : 2015년 7월

○ 사업 착공 : 2015년 8월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 12월

사업명

휴천면소재지 종합정비사업

담당자

건설교통과 임채진(☎960-4388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 휴천면 목현리 일원

○ 규 모 : 다목적회관, 게이트볼장, 운동장시설개선, 아토피힐링산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,719백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년도	‘16년도	‘17년도 이후
계	6,719	691	1,450	1,143	3,435
국 비	4,703	484	1,015	800	2,404
시 도 비	605	62	130	103	310
시군구비	1,411	145	305	240	721
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 삼동권역 종합정비사업 기본계획 수립 : 2014년 10월

○ 삼동권역 종합정비사업 시행계획 수립 : 2015년 5월

○ 사업 착공 : 2015년 8월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 12월

사업명

도천~구라(군도16호선)우회도로 개설사업

담당자

건설교통과정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도16호선의 굴곡이 심하고 협소하여 시거확보 불량으로 교통사고 우려

함양산삼항노화엑스포 개최에 따른 대봉산 자연휴양림을 찾는 관광객이       증가 될 것으로 예상되어 우회도로 개설이 요구 됨.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018년

○ 위 치 : 병곡면 월암리

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.95km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500	584	1,500	500	916
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	584	1,500	500	916
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기본계획 및 실시설계 : 2014. 2.

○ 행정절차이행 및 보상 : 2014. 10.

○ 사업 착공 : 2014. 11.

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2018. 1.

사업명

서백소하천 정비사업

담당자

안전관리과 유재영(☎960-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치수, 생태계 보전 등 지역주민생활의 편익 증진 및 친환경하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 7월 ~ 2017. 7월

○ 위 치 : 함양군 백전면 양백리

○ 규 모 : 소하천 정비 L=0.76km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,276백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,276	400	1,612	1,264	0
국 비	1,638	200	806	632	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,638	200	806	632	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 7월 : 사업착공

○ 2016. 7월 : 사업완료

사업명

원교공동묘지정비사업

담당자

도시환경과 임주섭(☎960-5212)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거지내 기피시설인 공동묘지를 철거함으로써 마을경관 개선

및 쾌적한 정주환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 함양읍 교산리 336번지외 5필지

○ 규 모 : 부지정비 7,056㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,100	206	2,214	680
국 비	1,400	144	780	476
시 도 비	180	19	100	61
시군구비	1,520	43	1,334	143
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 부지매입 완료(5필지, 4,649㎡)

○ 분묘이전 완료(331기)

○ 부지조성공사 시행중

□ 향후계획

○ 2016. 9. 30.한 사업완료

사업명

교산군계획시설도로(소로1-5호선) 개설공사

담당자

도시환경과 임주섭(☎960-5212)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양읍 교산리 일원의 미정비된 마을도로를 개설하여 도시 기반시설

확충 및 지역민의 오랜 숙원사업 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2015년

○ 위 치 : 함양읍 교산리 원교마을

○ 규 모 : 도로개설 L=220m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,440	817	623
국 비
시 도 비	220	220
시군구비	1,220	597	623
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 8.한 사업완료

사업명

돈육가공시설 지원사업

담당자

농축산과 정정훈(☎960-4779)

□ 사업목적 및 필요성

○ 돼지고기 비선호부위를 이용한 가공품의 제조, 가공 유통, 체험의 일원화로 도·농 연계특화시스템을 구축하여 유통단계 축소를 통한 값싸고 고품질의 돈육제품을 소비자에게 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ~2016. 12.

○ 위 치 : 함양읍 운림리 340-2, 340-18

○ 규 모 : 부지면적 1,050㎡, 건축연면적 1,275.5㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,720	64	1,992	664
국 비	1,360	32	996	332
시 도 비	163	4	119	40
시군구비	381	9	279	93
지 방 채
민간자본	816	19	598	199
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)

○ 2016. 2. : 건축공사 완료

○ 2016. 5. : 제조 가공 장비 90% 완료

□ 향후계획

○ S/W 컨설팅 부분 완료 예정

○ 장비 미완료 분 정산

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농업기술센터 신축공사

담당자

농축산과 윤효정(☎960-4655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업기술센터 사무실 통합으로 민원불편 해소 및 행정 능률 향상과 농업관련

기관 결집으로 원스톱 농업서비스 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 5월 ~ 2016. 9월

○ 위 치 : 함양읍 이은리 61번지 일원

○ 규 모 : 연면적 4,956㎡, 건축면적 2,284㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	16,013	818	4,486	10,709
국 비	4,600	409	1,061	3,130
시 도 비	1.925	-	470	1,455
시군구비	9,488	409	2,955	6,124
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 91%)

○ 건축 마감 중, 토목 외부 주차장 조성 및 마무리 작업 중

□ 향후계획

○ 2016. 9월 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 변경 : 당초  150억 → 변경 160억

사업명

함양군 스포츠파크 조성사업

담당자

문화관광과 채원식(☎960-5164)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠파크 조성으로 전지훈련팀 및 종목별 전국대회를 유치하고,

군민의 건강증진과 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기  간 : 1단계 : 2012. 1월 ~ 2016. 12월

2단계 : 차후

○ 위  치 : 함양군 함양읍 백연리 610번지 일원

○ 규  모 : 205,125㎡ (1단계 : 146,260㎡, 2단계 : 58,865㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	22,100	6,850	79	2,625	11,800
국 비	5,800	200	26	1,050	4,220
시 도 비	2,600	150	-	-	2,450
시군구비	13,700	6,500	53	1,575	5,130
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2014.  4월 : 함양스포츠파크 조성사업 타당성검토 및 기본계획수립 용역

○ 2014. 8~10월 : 경상남도 투융자심사 재상정(타당성검토 결과 반영)

○ 2014. 10월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2014. 10월 ~ 2015.12월 : 각종 용역사업 완료 및 행정절차 이행

○ 2016.  3월 ~ 6월 : 도 건설기술심의 및 계약심사 결과 완료

□ 향후계획

○ 2016. 9월 ~ 2020. 12월 : 1단계 사업착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구분	변경전	변경후	사유	비고
규 모	205,795㎡	205,125㎡ (1차 146,260㎡)	규모 과다로 인한 재검토 사업타당성조사로 적정규모 조정
사업비	258억	221억

사업명

함양 제2일반산업단지 진입도로 개설사업

담당자

경제과 김기현(☎960-4055)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경상남도 항노화 산업과 우리군 역점시책인 함양 항노화 산업단지의 주 진입도로로서 대형차량 등 교통량 급증

○ 기존 도로가 노폭이 협소하고 굴곡이 심해 대형차량 진출입시 교통사고 위험 및 통행 불편이 예상되어 금회 개설사업으로 문제 해결

○ 투자예정 잔여부지에 대한 기업 투자유치 용이

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 6. ~ 2016. 11.

○ 위 치 : 함양군 지곡면 보산리, 공배리, 함양읍 신관리 일원

○ 규 모 : 진입도로 개설 L=765m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,937백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,937	82	1,085	1,770	-
국 비
시 도 비	1,350	-	542	808	-
시군구비	1,587	82	543	962	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015. 6. : 함양 제2일반산업단지 진입도로 개설공사 착공

○ 2016. 3. : 미협의 토지등 수용재결위원회 심의 완료

□ 향후계획

○ 2015. 8. : 도로 포장 및 사업 준공

사업명

대방~중기간 도로 확포장공사

담당자

건설교통과정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백전~임실 간 도로 확포장사업이 일부 구간만 확장 후, 장기간 중단된        상태로 동절기 폭설 및 결빙시 교통 불편 초래

지역주민의 오래된 주민숙원 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018년

○ 위 치 : 백전면 운산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.9km, B=9m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,000	3,000	1,000	250	2,750
국 비
시 도 비	5,500	2,000	500	250	2,750
시군구비	1,500	1,000	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본계획 및 실시설계 : 2014. 2.

○ 행정절차이행 및 보상 : 2014. 10.

○ 사업 착공 : 2014. 10.

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2018. 12.

사업명

군도9호선(원산~지소)도로 확포장

담당자

건설교통과정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 9호선 미개설된 도로 종점부에 치유의 숲, 휴양림 등 군주요사업장      이 위치하고 있어 도로확장이 요구 됨

함양산삼항노화엑스포 개최로 증가되는 관광객 교통여건 개선 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017년

○ 위 치 : 병곡면 원산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.98km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,100	516	900	300	384
국 비
시 도 비
시군구비	2,100	516	900	300	384
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 및 실시설계 : 2014. 2.

○ 행정절차이행 및 보상 : 2015. 6.

○ 사업 착공 : 2015. 8.

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2017. 8.

사업명

관동소하천 정비사업

담당자

안전관리과 유재영(☎960-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치수, 생태계 보전 등 지역주민생활의 편익 증진 및 친환경하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 함양군 함양읍 난평리

○ 규 모 : 소하천 정비 L=1.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,710	0	600	1,000	3,110
국 비	2,355	0	300	500	1,555
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,355	0	300	500	1,555
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015. 3월 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 1월 : 사업착공

○ 2016. 7월 : 보상, 교량 2개소, 호안 시공중

□ 향후계획

○ 2016. 11월 : 1차분 준공

○ 2017.  1월 : 2차분 시행

○ 2017. 12월 : 총괄 사업완료

사업명

미동소하천 정비사업

담당자

안전관리과 유재영(☎960-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치수, 생태계 보전 등 지역주민생활의 편익 증진 및 친환경하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 함양군 수동면 화산리

○ 규 모 : 소하천 정비 L=0.82km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,006	0	1,200	1,000	4,806
국 비	3,503	0	600	500	2,403
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,503	0	600	500	2,403
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015. 3월 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 1월 : 사업착공

○ 2016. 7월 : 보상, 교량 3개소 건물철거 10동

□ 향후계획

○ 2016. 11월 : 1차분 준공

○ 2017.  1월 : 2차분 시행

○ 2017. 12월 : 총괄 사업완료

사업명

축동소하천 정비사업

담당자

안전관리과 유재영(☎960-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치수, 생태계 보전 등 지역주민생활의 편익 증진 및 친환경하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 함양군 병곡면 옥계리

○ 규 모 : 소하천 정비 L=1.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000	0	3,000	0	0
국 비	1,500	0	1,500	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,500	0	1,500	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015. 7월 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 1월 : 사업착공

○ 2016. 5월 : 1차분 준공

○ 2016. 6월 : 2차분 시행

□ 향후계획

○ 2016. 9월 : 총괄준공

사업명

함양공공하수처리시설증설사업

담당자

상하수도사업소 임원석(☎960-4742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「함양군 하수도정비기본계획 변경 (2013. 01)」상의 목표연도 2015년 기준

증설사업 승인용량 Q=3,000㎥/일을 기준으로 기본 및 실시설계를 수행

후 낙동강유역환경청(한국환경공단 기술검토) 재원협의시 계획하수량,

계획수질등을 재검토하여 최종 증설용량  Q=2,600㎥/일로 변경

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 12. 20. ~ 2015. 11. 13.

○ 위 치 : 함양군 함양읍 하림강변길 187(함양공공하수처리장)

○ 규 모 : 시설용량 증설 2,600㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,196백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,196	3,865	1,331	-	-
국 비	2,598	1,949	649
시 도 비	520	390	130
시군구비	898	673	225
지 방 채	-	-	-
민간자본	-	-	-
기 타	1,180	853	327

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업시행 : ‘13. 12월

○ 시운전 : ‘15. 8월

○ 사업완료 : ‘15. 11월

사업명

함양군하수관거임대형민자사업(BTL)

담당자

상하수도사업소 임원석(☎960-4742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 합류식 하수관로를 분류식으로 정비하고 모니터링시스템 구축을

통한 최적의 하수관로 체계를 수립하여 하수처리시설 운영효율을

극대화함으로써 위천 · 구룡천의 수질개선 도모와 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘15. 7. ~ ’37. 9.     ○ 위    치 : 함양군 함양읍

○ 민간사업자 : 함양에코라인(주) ○ 총사업비 : 59,694백만원(민자)

○ 사업규모 : 오수관로 L=23.6km, 우수관로 L=6.9km, 배수설비 2,719개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(사업기간:‘15~’17  운영기간:‘17~’37)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	59,852	800	52	-	59,000
국 비	41,300	-	-	-	41,300
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,932	800	52	-	7,080
기 타	10,620	-	-	-	10,620

□ 추진단계(시공 중)

○ 대상사업지정 및 기본계획수립 고시 : ‘13. 12월

○ 실시계획 승인 및 고시 : ‘15. 7월

○ 사업시행 : ‘15. 7월 ~ ’17. 9월(2년간)

□ 향후계획

○ 위탁운영 및 운영성과 평가 : ‘17. 10월 ~ ’37. 9월(20년간)

사업명

이은~난평간 도로 확포장공사

담당자

건설교통과 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일부구간 4차로 개통에 따른 교통불편 및 교통사고 위험 상존

대형차량 증가에 따른 시가지 병목현상 해소 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018년

○ 위 치 : 함양읍 이은~난평리

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.1km, B=9.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	18,000		200		17,800
국 비
시 도 비	18,000		200		17,800
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 투융자 심사 승인 : 2015. 10.

○ 기본계획 및 실시설계 : 2016. 6.

□ 향후계획

○ 행정절차 이행 : 2016. 12.

○ 편입부지 보상 : 2017. 1.

사업명

산악레포츠활성화 지원사업

담당자

지역발전과 소성호(☎960-4780)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산삼휴양밸리 조성사업과 연계하여 산림레포츠 종합시설을 도입하여 전국 최초 산림레포츠 시범단지 조성

○ 경남미래 50년 사업인 산삼휴양밸리 조성사업과 연계하여 산림레포츠 종합시설을 조성하여 일자리 창출 및 지역주민 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리, 광평리 일원

○ 규 모

- MTB지원센터 1동, MTB코스 12.8km, 짚라인 2.3km

- 패러글라이딩 이·착륙장 3개소, 산악마라톤코스 15km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,000	-	129	610	5,261
국 비	3,000	-	-	300	2,700
시 도 비	900	-	-	90	810
시군구비	2,100	-	129	220	1,751
지 방 채	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015. 02. : 기본계획 및 타당성 조사용역 시행

○ 2015. 08. : 지방재정투자심사

○ 2015. 12. : 관련법 제정(시행 2016. 3. 28.)

○ 2016. 01. ~ 2016. 05. : 법 제정으로 인한 기본계획 변경

○ 2016. 06. : 실시설계용역 시행

□ 향후계획

○ 2016. 12. : 조성계획 승인 및 사전 행정절차 완료

○ 2017. 01. : 사업 착공

○ 2018. 12. : 사업 준공

○ 2019. 01. ~ 6. : 개장준비 및 임시운영

○ 2019. 07. : 전면 개장