개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

불로장생 산삼휴양밸리 조성

담당자

지역발전과 강승훈 (☎960-4014)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청정 함양 산양삼을 산악관광과 접목시켜 휴양치유 복합관광 단지를 조성함으로써 산촌지역의 새로운 경영수익사업 모델 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산22번지 일원

○ 규 모 :

- 모노레일 설치 L=3.95Km, 상․하부 승강장 1,263.69㎡(3층, 건축면적 939.52㎡)

- 진입도로 정비 L=2.5Km, 주차장 및 기반정비 A=52,400㎡(507대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	25,000	10,750	8,000	3,000	3,250
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	20,000	6,750	7,000	3,000	3,250
시군구비	5,000	4,000	1,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2013. 06. : 경남미래 50년 전략사업 선정

○ 2013. 12. : 진입도로 정비공사(대봉교~하부승강장) ⇒ 준공(’15. 12.)

○  2014. 03. : 모노레일 하부승강장 설치공사 ⇒ 준공(’16. 08.)

○ 2014. 04. : 모노레일(좌안) 제작 및 설치공사 착공

○  2015. 02. : 진입도로 정비공사(주차장~대봉교) 착공

○  2015. 03. : 주차장 및 기반정비공사 착공

□ 향후계획

○ 2017. 07. : 모노레일 제작 및 설치(우안)

○ 2018. 12. : 최종 준공(임시운영 2019. 1.~3.)

○ 2019. 04. : 전면 개장

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고운 최치원선생 사당 조성사업

담당자

문화관광과 정윤화 (☎960-5165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고운 최치원 선생의 학문과 사상 등을 이해할 수 있는 학습의 장을 마련하고,

상림 숲 조성의 애민정신을 스토리텔링화하여 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양군 함양읍 교산리 지내

○ 규 모 : 부지면적 18,521㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,456백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,456	4,676	480	1,300
국 비	1,450	1,210	240
시 도 비	435	363	72
시군구비	4,571	3,103	168	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2008.  1월 : 기본계획 수립

○ 2011. 12월 : 군관리계획(역사공원) 결정 및 지형도면 승인 고시

○ 2013.  9월 : 실시계획 인가 고시

○ 2013. 12월 : 공사 총괄(토목, 건축, 전기, 통신 등) 발주

○ 2015.  7월 : 사업(변경) 실시설계(건축) 완료 및 실시설계(토목) 발주

○ 2017.  6월 : 기념관, 전시관, 사료관 건축 완료

□ 향후계획

○ 2017. 11월 : 고운루, 내삼문, 화장실, 포장공사 등 완료

○ 2017. 12월 : 전체공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	변경내용	변경사유
당초	사업기간 : 2008~2014, 사업비 : 39억원	차별화된 사업 추진을 위한 공사비 및 추가 토지매입비 증가
현재	사업기간 : 2008~2017, 사업비 : 52억원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

봉전마을 권역단위 종합정비사업

담당자

안전건설과 김동수(☎960-4061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016년

○ 위 치 : 서하면 봉전리 일원

○ 규 모 : 전통예절관 조성, 우전문화관 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,200	2,203	1,997		-
국 비	2,940	1,542	1,398
시 도 비	379	199	180
시군구비	881	462	419
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 기본계획 수립 : 2013년 10월

○ 시행계획 수립 : 2014년 6월

○ 사업 착공 : 2014년 9월 ~

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

마천면 소재지 종합정비사업

담당자

안전건설과 정지영(☎960-4530)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상 면소재지 거점기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016년

○ 위 치 : 마천면 가흥리 일원

○ 규 모 : 커뮤니티 센터 조성, 공영주차장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,781백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,781	3,845	2,936
국 비	4,746	2,691	2,055
시 도 비	610	346	264
시군구비	1,425	808	617
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 기본계획 수립 : 2013년 7월

○ 시행계획 수립 : 2014년 11월

○ 사업 착공 : 2015년 2월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 8월

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지곡면 소재지 종합정비사업

담당자

안전건설과 김동수(☎960-4061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 면소재지 거점기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016년

○ 위 치 : 지곡면 개평리, 창평리 일원

○ 규 모 : 전선 및 통신선 지중화, 창촌마을복지회관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,650	4,363	2,287
국 비	4,654	3,054	1,600
시 도 비	599	393	206
시군구비	1,397	916	481
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 시행계획 수립 : 2014년 9월

○ 사업 착공 : 2014년 10월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농월정 관광지 정비사업

담당자

문화관광과 문성용(☎4821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국민들의 여가 활동 증가와 자동차를 이용한 레저, 캠핑 활동의 증가로       다양하게 변화하는 관광형태 추세에 대응하는 관광지 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년(7개년)

○ 위 치 : 안의면 월림리 일원

○ 규 모 :

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원(국비 4,000,  도비 1,200,  군비 2,800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,000	2,300	2,000	1000	2700
국 비	4,000	1,150	1,000	500	1350
시 도 비	1,200	345	300	150	405
시군구비	2,800	805	700	350	945

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 1차 사업(오토캠핑장 조성) 준공 : 2016년 6월

○ 농월정 교량 경관조명 설치사업 착공 : 2017년 6월

○ 3차 사업(휴게공원 조성) 실시설계 완료 : 2017년 7월

□ 향후계획

○ 3차 사업(휴게공원 조성) 착공 : 2017년 8월

○ 2차 사업(도로, 주차장, 상하수도정비 등) 준공 : 2017년 8월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양 목재문화 체험장 조성사업

담당자

산림녹지과 강민정

(☎960-4007)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목재문화체험장과 야외모험시설 조성으로 지역경제 활성화기여

○ 숲속체험·전시를 통한 국산목재의 우수성 홍보 및 저탄소 녹색성장 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년~2018년 (6년간)

○ 위 치 : 안의면 이전리 468-8번지 일원

○ 규 모 : 건축 2동(체험관 656.56㎡,제재소 118.25㎡), 야외모험시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,200	2,045	875	880	1,400
국 비	4,160	1600	700	704	1,156
시 도 비	312	120	52.5	52.8	86.7
시군구비	728	325	122.5	123.2	157.3

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2013년 : 기본계획 및 실시설계

○ 2014년 : 기반공사(조경, 토목, 상·하수도 등)

○ 2015년 : 건축2동 완료

○ 2016년 : 전시부문 설치공사, 야외소나무정비, 오일스텐 칠 등

○ 2017년 : 방염공사, 수목식재, 야외모험시설 1차 년도 사업시행

□ 향후계획

○ 2018년 : 야외모험시설 2차 년도 사업시행 및 목공기계 구입 등

○ 2019년 : 위탁 또는 직영운영

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산림생태·문화체험 단지 조성

담당자

지역발전과 김병로(☎960-4073)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여가생활 변화에 따른 체류형 산림휴양공간 조성과 모험레포츠 체험시설을 통해 산림자원의 새로운 수익모델 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2019

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리 산1 일원

○ 규 모

- 진입도로 확·포장  L=1.81Km, B=11m

- 관리사무소, 단체숙소, 식당, 숲속의 집, 캠핑장 등

- 산림레포츠시설(짚라인, 모험지원센터, 산림모형시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	27,000	8,000	2,400	1,800	14,800
국 비	13,500	4,000	1,200	900	7,400
시 도 비	4,050	1,200	360	270	2,220
시군구비	9,450	2,800	840	630	5,180

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2014. 05. : 진입도로 정비공사 착공

○ 2015. 04. : 자연휴양림 지정고시 완료

○ 2015. 05. : 기반정비공사 착공

○ 2016. 02. : 자연휴양림 조성계획 승인(경상남도)

○ 2016. 06. : 부대시설공사 착공

□ 향후계획

○ 2017. 06. : 건축공사 착공

○  2019. 12. : 최종 준공

○  2020. 01. : 전면 개장

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

치유의 숲 조성사업

담당자

지역발전과 소성호

(☎960-4780)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대봉산 천혜 자연환경을 활용한 자연치유 공간 조성으로 인체의 면역력 향상 및 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 함양군 병곡면 광평리 산1번지 일원

○ 규 모

- 기반정비공사(계류정비, 체험길 조성, 오수관로매설 등)

- 치유센터(724.49㎡, 2층), 요리체험장(252.56㎡, 1층)

- 모험놀이 숲(27종) 조성, 전기‧통신‧소방공사 1식, 감리 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	2,100	1,600	1,300	-
국 비	2,500	1,050	800	650	-
시 도 비	750	315	240	195	-
시군구비	1,750	735	560	455	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2014. 04. : 치유의 숲 조성계획 승인(행정절차 완료)

○ 2014. 04. : 기반정비 공사 착공

○ 2014. 05. : 모험놀이 숲 공사 착공

○ 2015. 02. : 치유센터 건축공사 착공 ⇒ 준공(’16. 06.)

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 최종 준공(임시운영 2018. 1.~6.)

○ 2018. 07. : 전면 개장

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

원교공동묘지정비사업

담당자

도시환경과

김동현(☎055-960-4743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거지내 기피시설인 공동묘지를 철거함으로써 마을경관 개선 및 쾌적한       정주 환경을 조성코자함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년(3년간)

○ 위 치 : 함양군 함양읍 교산리 336번지 일원

○ 규 모 : 7,056㎡ (농경지 2,647㎡, 임야 2,002㎡, 기타 2,407㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계		1,851	1,249
국 비		924	476
시 도 비		119	61
시군구비		808	712
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 10. 31. : 사업 준공

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

죽림마을 권역단위 종합정비사업

담당자

안전건설과 김동수(☎960-4061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 함양읍 죽림리 일원

○ 규 모 : 팔령치 교류센터, 마을회관 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,463백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,463	1,076	428	1,959
국 비	2,424	753	300	1,371
시 도 비	311	97	38	176
시군구비	728	226	90	412
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 기본계획 수립 : 2014년 10월

○ 시행계획 수립 : 2015년 10월

○ 사업 착공 : 2015년 10월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

삼동마을 권역단위 종합정비사업

담당자

안전건설과 정지영(☎960-4530)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 병곡면 옥계리 일원

○ 규 모 : 진입로정비, 다목적회관 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,599	1,068	1,143	1,388
국 비	2,519	748	800	971
시 도 비	324	96	103	125
시군구비	756	224	240	292
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본계획 수립 : 2014년 9월

○ 시행계획 수립 : 2015년 7월

○ 사업 착공 : 2015년 8월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

돈육가공시설 지원사업(제조·가공·유통)

담당자

농축산과 정정훈(☎960-4779)

□ 사업목적 및 필요성

○ 돼지고기 비 선호부위를 이용한 가공품의 제조․가공․유통․체험의 일원화로       도․농 연계특화시스템을 구축하여 유통단계 축소를 통한 값싸고 고품질의       돈육제품을 소비자에게 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 5. ~ 2016. 12.월

○ 위 치 : 함양군 함양읍 상림1길 13-7

○ 규 모 : 지하1(194.6㎡),지상1,2층(1,083.95㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,849백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,849	2,188	661	-	-
국 비	1,358	1,028	330	-	-
시 도 비	162	122	40	-	-
시군구비	381	288	93	-	-
민간자본	948	750	198	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 건축물 및 설비․부대시설

- 제조․가공시설(지하 1층), 유통․판매시설(지상 1층), 체험․세미나실(지상2층)

- 건축공사 지하1(186㎡),지상1,2층(1,090㎡), 1,292,852천원

- 제조․가공․유통․체험을 위한 설비․부대시설 등 1식, 1,173,001원

○ 네트워크, 홍보 및 마케팅, 프로그램연구개발, 제품연구개발 등 구축

- 컨설팅 2회 실시, 293,348천원

- 제품개발(소시지 3종)

□ 향후계획

○ 소비자요구의 다양화와 유통형태의 변화(대형마트, 편의점 등)에 따른 NB,       PB 상품 개발 접근, 차별화요소 강화와 경쟁력 있는 프리미엄 돈육가공품,       다양한 체험프로그램 등 중․장기 전략 추진으로 신규시장을 발굴

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농업기술센터 신축공사

담당자

농축산과 윤효정(☎960-4655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업기술센터 사무실 통합으로 민원불편 해소 및 행정 능률 향상과 농업관련

기관 결집으로 원스톱 농업서비스 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 5월 ~ 2016. 9월

○ 위 치 : 함양읍 이은리 61번지 일원

○ 규 모 : 연면적 4,956㎡, 건축면적 2,284㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,013백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	16,013	5,304	10,709	0
국 비	4,600	1,470	3,130
시 도 비	1,925	470	1,455
시군구비	9,488	3,364	6,124
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 준공 완료(2016. 10월)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

휴천면 소재지 종합정비사업

담당자

안전건설과 백상재(☎960-4441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충으로 농촌지역 주민의 삶의        질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 휴천면 목현리 일원

○ 규 모 : 다목적회관, 게이트볼장, 운동장시설개선, 아토피힐링산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,719백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,719	2,141	1,143	3,434
국 비	4,703	1,499	800	2,404
시 도 비	605	192	103	309
시군구비	1,411	450	240	721
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 기본계획 수립 : 2014년 10월

○ 시행계획 수립 : 2015년 5월

○ 사업 착공 : 2015년 8월

□ 향후계획

○ 사업 준공 : 2017년 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도천~구라(군도16호선) 우회도로 개설사업

담당자

안전건설과 서정우

(☎960-4257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 병곡면 월암마을(100여가구)의 중심부를 통과하는 군도16호선의 노폭협소, 굴곡

으로 차량 시거 미확보로 인한 빈번한 교통사고 발생

○ 대봉산 자연 휴양림의 주 진입 도로로 향후 관광객 증가로 인한 대형버스 등

교통량 대폭 증가가 예상되어 우회도로 개설이 시급함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 3 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 함양군 병곡면 월암리

○ 규 모 : 우회도로개설 L=0.97km, B=9.0m, 교량 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,023백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,023	1,923	500	500	100
국 비
시 도 비
시군구비	3,023	1,923	500	500	100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2013. 10 : 실시설계용역 시행

○ 2014. 10 : 도로구역 결정고시

○ 2014. 11 : 사업 착공

□ 향후계획

○ 2018.  1 : 5차분 시행

○ 2018. 12 : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서백 소하천 정비사업

담당자

안전건설과 이성현(☎960-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치수, 생태계 보전 등 지역주민생활의 편익 증진 및 친환경하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 7월 ~ 2017. 7월

○ 위 치 : 함양군 백전면 양백리

○ 규 모 : 소하천 정비 L=0.76km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,276백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,276	2,012	1,264	0	0
국 비	1,638	1,006	632	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,638	1,006	632	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 7월 : 사업착공

○ 2016. 7월 : 사업완료

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양 신관.백천지구 투자유치 예정부지 조성사업(재심사)

(함양 항노화 산업단지 조성)

담당자

경제교통과 투자유치담당

주무관 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군내에 공장 설립을 희망하는 기업을 위해 준비된 부지를 적기에 제공할 수 있도록 투자유치 예정부지를 사전 매입하여 기업유치 및 산업단지 조성

○ 기업유치를 통한 고용창출 및 주민소득증대와 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 함양군 함양읍 신관리 산 54-1번지 일원

○ 규 모

- 사 업 량 : 740,586㎡

- 총사업비 : 11,200백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,200	9,442	96	80	1,582
국 비
시 도 비
시군구비	11,200	9,442	96	80	1,582
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 2010.  5. : 편입부지 보상협의 추진(보상율 97%)

○ 2012. 11. : 개발행위 제한지역 지정 고시

○ 2014.  7. : 투자유치 활동 지속 추진

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물(분묘) 보상협의 지속 추진

○ 투자유치 활동 전개(투자유치설명회·박람회 참가 및 관련기관 방문 홍보)

□ 사업변경 내역

○ 사업명칭 변경 : 2016. 2. 1.

- 함양 제2일반산업단지 조성사업 → 함양 항노화 산업단지

(경상남도 항노화 산업 육성계획과 연계하여 추진코자 명칭 변경)

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

함양군 스포츠파크 조성사업

담당자

문화관광과 염희생(☎960-5164)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠파크 조성으로 전지훈련팀 및 종목별 전국대회를 유치하고,

군민의 건강증진과 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기  간 : 1단계 : 2012. 1월 ~ 2020. 12월

○ 위  치 : 함양군 함양읍 백연리 610번지 일원

○ 규  모 : 205,125㎡ (1단계 : 146,260㎡, 2단계 : 58,865㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	22,100	6,850	2,625	3,000	9,625
국 비	5,800	200	1,050	1,000	3,550
시 도 비	2,600	150	-	-	2,450
시군구비	13,700	6,500	1,575	2,000	3,625
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2014.  4월 : 함양스포츠파크 조성사업 타당성검토 및 기본계획수립 용역

○ 2014. 8~10월 : 경상남도 투융자심사 재상정(타당성검토 결과 반영)

○ 2014. 10월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2014. 10월 ~ 2015.12월 : 각종 용역사업 완료 및 행정절차 이행

○ 2016.  3월 ~ 6월 : 도 건설기술심의 및 계약심사 결과 완료

○ 2016. 11월 : 사업착공

□ 향후계획

○ 2020. 12월 : 사업준공

□ 사업변경 내역

구분	변경전	변경후	사유	비고
규 모	205,795㎡	205,125㎡ (1차 146,260㎡)	규모 과다로 인한 재검토 사업타당성조사로 적정규모 조정
사업비	258억	221억

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

대방~중기간 도로 확포장공사

담당자

안전건설과 서정우

(☎960-4257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백전~임실 간 도로 확․포장사업이 일부 구간만 2004년 확장 후, 장기간 중단

된 상태로 동절기 폭설 및 결빙 시 교통 불편 초래

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 함양군 백전면 운산리, 백운리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.9km, B=9.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,000	4,000	1,750	200	1,050
국 비
시 도 비	5,500	2,500	1,750	200	1,050
시군구비	1,000	1,000
지 방 채
민간자본
기 타	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 실시설계 완료 : 2014. 2.

○ 행정절차 이행 및 보상협의: 2014. 6.~12

○ 공사착공 : 2014. 10.

□ 향후계획

○ 2018.  1 : 5차분 시행

○ 2018. 12 : 사업준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

관동소하천 재해예방사업

담당자

안전건설과 이성현(☎960-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치수, 생태계 보전 등 지역주민생활의 편익 증진 및 친환경하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 함양군 함양읍 난평리

○ 규 모 : 소하천 정비 L=1.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,710	600	1,000	454	2,656
국 비	2,355	300	500	227	1,328
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,355	300	500	227	1,328
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2015. 3월 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 1월 : 사업착공

○ 2017. 4월 : 1차분 준공

○ 2017. 2월 : 2차분 시행

○ 2017. 7월 : 보상, 교량 2개소, 호안 시공중

□ 향후계획

○ 2019. 1월 : 총괄 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

미동소하천 재해예방사업

담당자

안전건설과 이성현(☎960-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치수, 생태계 보전 등 지역주민생활의 편익 증진 및 친환경하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 함양군 수동면 화산리

○ 규 모 : 소하천 정비 L=0.82km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,006	1,200	1,000	704	4,102
국 비	3,503	600	500	352	2,051
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,503	600	500	352	2,051
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2015.  3월 : 실시설계용역 시행

○ 2016.  1월 : 사업착공

○ 2016. 12월 : 1차분 준공

○ 2017.  2월 : 2차분 시행

○ 2017.  7월 : 보상, 교량 4개소 건물철거 10동, 호안시공중

□ 향후계획

○ 2019. 1월 : 총괄 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양군 상수관로 노후관 교체사업

담당자

상하수도사업소 김용대(☎960-4174)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적 공급으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 함양군 함양읍, 안의면 일원

○ 규 모 : 노후관 정비 L= 30km, 블록시스템(소블록)구축 12개소

유지관리시스템 구축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	22,600	-	100	2,643	19,857
국 비	11,300	-	-	1,585	9,715
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,300	-	100	1,058	10,142
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.4%)

○ 함양군 지방상수도 현대화사업 위수탁으로 수자원공사로 업무이관

○ 함양군 전 급수구역 블록시스템 구축을 위한 기본 및 실시설계중

□ 향후계획

○ 2017. 12월 : 사업 시행(함양군 블록시스템 구축공사)

○ 2021. 12월 : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)* 향후 계획

구분	당 초	변 경
사업규모	노후관 개량 L=30km	노후관 개량 L=27km
총사업비	226억원	176억원
사업기간	2016년~2021년	2016년~2021년

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양군하수관거임대형민자사업(BTL)

담당자

상하수도사업소 임원석(☎960-4742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 합류식 하수관로를 분류식으로 정비하고 모니터링시스템 구축을

통한 최적의 하수관로 체계를 수립하여 하수처리시설 운영효율을

극대화함으로써 위천 · 구룡천의 수질개선 도모와 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘15. 7. ~ ’17. 9.

○ 위 치 : 함양군 함양읍 일원

○ 규 모 : 오수관로 L=23.6km, 우수관로 L=6.9km, 배수설비 2,719개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,006백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	39,006	3,851	20,023	15,132	-
국 비
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본	39,006	3,851	20,023	15,132	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 대상사업지정 및 기본계획수립 고시 : ‘13. 12월

○ 실시계획 승인 및 고시 : ‘15. 7월

○ 사업시행 : ‘15. 7월 ~ ’17. 9월(26개월)

□ 향후계획

○ 사업완료 : ‘17. 9월

○ 사업운영 : ‘17. 10월 ~ ’37. 9월(20년간)

□ 사업변경 내역(해당없음)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

군도9호선(원산~지소)도로 확포장공사

담당자

안전건설과 서정우

(☎960-4257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미개설된 도로로 종점부에 치유의 숲 휴양림, 불로장생 산삼밸리 등 군

주요사업장 산재로 도로확포장이 시급함

○ 2020 함양 세계 산삼엑스포 개최 등 증가되는 관광객 및 지역주민의

안전한 도로환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.98km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,760백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,760	1,960	400	400	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,760	1,960	400	400	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2013. 10 : 실시설계용역 시행

○ 2014. 11 : 사업착공

○ 2016.  9 : 도로구역 결정고시

□ 향후계획

○ 2017.  3 : 3차분 시행

○ 2017. 12 : 사업준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

축동소하천 재해예방사업

담당자

안전건설과 이성현(☎960-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치수, 생태계 보전 등 지역주민생활의 편익 증진 및 친환경하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2016. 10월

○ 위 치 : 함양군 병곡면 옥계리

○ 규 모 : 소하천 정비 L=1.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	3,000	0	0	0
국 비	1,500	1,500	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,500	1,500	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 7월 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 1월 : 사업착공

○ 2016. 10월 : 사업완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농산물종합가공센터 이전설치사업

담당자

농축산과 윤효정(☎960-4655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업인의 가공활동 활성화를 위한 창업교육, 공동기기 활용, 공동기술          개발 등 농업인의 농외소득 활동과 농식품산업 발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 5월 ~ 2016. 9월

○ 위 치 : 함양읍 이은리 61번지 일원

○ 규 모 : 건축면적 434㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,000	404	1,596
국 비
시 도 비	1,000	202	798
시군구비	1,000	202	798
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 준공완료(2016. 10월)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양 제2일반산업단지 진입도로 개설사업

담당자

경제교통과 투자유치담당

주무관 정수재(☎960-4423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경상남도 항노화 산업과 우리군 역점시책인 함양 항노화 산업단지의 주진입도로로서 대형차량 등 교통량 급증

○ 기존 도로가 노폭이 협소하고 굴곡이 심해 대형차량 진출입시 교통사고 위험 및 통행 불편이 예상되어 금회 개설사업으로 문제 해결

○ 투자예정 잔여부지에 대한 기업 투자유치 용이

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 6. ~ 2016. 11.

○ 위 치 : 함양군 지곡면 보산리, 공배리, 함양읍 신관리 일원

○ 규 모 : 진입도로 개설 L=765m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,937백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,937	1,167	1,770
국 비
시 도 비	1,350	542	808
시군구비	1,587	625	962
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.  6. : 함양 제2일반산업단지 진입도로 개설공사 착공

○ 2016.  3. : 미협의 토지 등 수용재결위원회 심의 완료

○ 2016. 11. : 진입도로 개설공사 완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

거함산 항노화 휴양체험지구

심마니 체험길조성

담당자

지역발전과 김병로

(☎960-4073)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백두대간권(지리산, 덕유산) 관광자원을 연계한 테마형 체험관광 거점 개발로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리, 광평리 일원

○ 규 모

- 기반시설(탐방로, 주차장), 심마니 체험길 L=7.1㎞

- 산삼 콤플렉스센터 2,767㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,,8000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,800	400	169	3,091	6,140
국 비	4,900	-	130	1,500	3,270
시 도 비	1,470	120	39	450	861
시군구비	3,430	280	-	1,141	2,009

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2012. 04. : 백두대간권 발전종합계획 수립(6개도 공동)

○ 2014. 03. : 내륙권발전 선도사업 선정

○ 2014. 06. : 백두대간발전종합계획 결정 및 고시

○ 2014. 09. : 개발계획수립 용역완료 및 결정 및 고시

○ 2015. 12. : 국비 4억원 확보(3개군 전체)

○ 2016. 11. : 실시설계 용역 착공(~`17. 10.)

□ 향후계획

○ 2017. 06. : 건축공사 착공

○ 2019. 12. : 최종준공

○ 2020. 01. : 전면 개장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산악레포츠활성화지원사업

담당자

지역발전과 소성호

(☎960-4780)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산삼휴양밸리 조성사업과 연계하여 산림레포츠 종합시설을 도입하여 전국 최초 산림레포츠 시범단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 함양군 병곡면 원산리, 광평리 일원

○ 규 모

- MTB지원센터 1동, MTB코스 7.54km, 짚라인 2.19km

- 패러글라이딩 이륙장, 산악마라톤코스 5.6km, 자가발전모노레일(150m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000	129	610	-	5,261
국 비	3,000	-	300	-	2,700
시 도 비	900	-	90	-	810
시군구비	2,100	129	220	-	1,751

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015. 02. : 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 ⇒ 준공(’16. 06.)

○ 2015. 12. : 관련법 제정(시행 2016. 3. 28.)

○ 2016. 01. ~ 2016. 05. : 법 제정으로 인한 기본계획 변경

○ 2016. 06. : 실시설계용역 시행 ⇒ 준공(’16. 12.)

□ 향후계획

○ 2017. 04. : 조성계획 승인 및 사전 행정절차 완료

○ 2017. 06. : 조경공사 착공

○ 2018. 01. : 건축공사 착공

○ 2019. 12. : 최종준공

○ 2020. 01. : 전면 개장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산양삼산업화단지조성사업

담당자

산삼항노화엑스포과 하정민

(☎960-5794)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함양 산삼의 역사성과 차별성을 알리고, 전국 산양삼의 주생산지인 우리지역의 특화된 재배환경을 기반으로 건강•관광산업의 마케팅 기반조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015 ~ 2017

○ 위 치 : 경남 함양군 함양읍 교산리 1043번지 일원

○ 규 모 : 산삼전시관 2층 1,512㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	646	1,400	2,954
국 비	2,500	323	700	1,477
시 도 비	750	97	210	443
시군구비	1,750	226	490	1,034
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본계획 및 실시설계용역 : 2015. 8 ~ 2016. 12

○ 공원조성계획 및 인가 : 2016. 9

□ 향후계획

○ 사업 착공 및 완료예정 : 2017. 1 ~ 2017. 12

○ 사업완료 및 시범운영 : 2018. 1 ~ 2

□ 사업변경 내역

○ 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

이은~난평간 도로확포장공사

담당자

안전건설과 서정우

(☎960-4257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일부구간 4차로 개통에 따른 교통불편 및 교통사고 위험 상존

○ 국도3호선과 24호선 연결 및 함양 우회도로 개설로 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 함양군 함양읍 이은리

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.1km, B=9.5m, 교량 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	18,000	0	200	1,000	16,800
국 비
시 도 비	15,300	0	200	1,000	14,100
시군구비	2,700	0	0	0	2,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016. 6 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 8 : 행정절차 이행(소규모환경영향평가, 군관리계획결정 등)

○ 2017. 5 : 지방도 노선변경

○ 2017. 8 : 보상협의

□ 향후계획

○ 2018. 1 : 사업착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

체류형 농업창업지원센터 건립

담당자

농축산과 배선수(☎960-4237)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시민의 농촌이주 증가로 안정적이고 지속적인 인구유입시스템 구축

○ 함양군 미래농업 50년 프로젝트 사업의 젊은 인력 유입 기틀마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 함양읍 이은리 85번지 일원

○ 규 모 : 체류형 주택 15동(30호), 세미나동(661.62㎡) 1동, 창고(192㎡) 1동, 하우스(1,000㎡) 1동, 텃밭(3,300㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,000	-	531	7,469	-
국 비	4,000	-	265	3,735	-
시 도 비	1,200	-	80	1,120	-
시군구비	2,800	-	186	2,614	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ ‘16.  2월 : 기본계획승인(농림축산식품부)

○ ‘16.  6월 : 행정절차이행(환경영향평가 등), 실시설계

○ ‘16. 11월 : 편입부지 매입

○ ‘17.  1월 : 토목공사 시행

○ ‘17.  4월 : 건축, 전기, 통신, 소방공사 시행

□ 향후계획

○ ‘18.  1월 : 사업완료

○ ‘18.  4월 : 체류형 농업창업지원센터 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

함양문화원 건립

담당자

문화관광과 김경록(☎960-4047)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역전통문화 계승·발전을 위한 전략적 거점을 확보하고 변화되는 트렌드에 적극 대응하여 군민의 문화적 욕구 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2019년

○ 위 치 : 함양읍 교산리 337번지 일원

○ 규 모 : 부지 2,668㎡, 건축 1,699.52㎡(지하1층~지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,616백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,616		170		4,446
국 비	1,846				1,846
시군구비	2,770		170		2,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015. 12월 : 타당성 조사 및 기본계획 수립

○ 2016.  5월 : 지방재정 투자심사 승인

○ 2016.  7월 : 기본계획 및 실시설계 용역 발주

○ 2017.  4월 : 문체부 사전평가 심사(적정)

○ 2017.  4월 : 국비(1,531백만원) 확보

□ 향후계획

○ 2017.  9월 : 기본계획 및 실시설계 용역 발주

○ 2017. 12월 : 건축 허가

○ 2018.  1월 ~ 2019. 12월 : 공사 착공 및 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함양군 행복주택 건립

담당자

민원봉사과 성일현(☎960-4574)

□ 사업목적 및 필요성

행복주택을 건립하여 젊은층, 기업체 근로자 등에게 쾌적하고 저렴한

주거환경을 제공하고 함양군 인구 늘리기에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ∼ 2019년(4년간)

○ 위 치 : 경남 함양군 함양읍 교산리 241번지 일원

○ 규 모 : 행복주택 150세대 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	18,000		1,600	4,400	12,000
국 비	4,500			900	3,600
시 도 비
시군구비	5,300		1,600	2,300	1,400
지 방 채	6,000			1,200	4,800
민간자본
기 타	2,200				2,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업부지 80% 매입

○ 개발사업 위탁 협약 체결(경남개발공사)

□ 향후계획

○ 2017. 6월 : 부지매입, 설계용역 완료

○ 2017. 7월 : 주택건설사업계획 승인

○ 2018. 1월 : 공사 착공

○ 2019. 3월 : 입주자 모집공고

○ 2019. 9월 : 공사 준공