물레방아골 함양

건 설 과

43. 주민숙원(건의)사업 ---------- 77 44. 도로망 확충 사업 ------------ 78 45. 백현권역 종합개발사업 ------- 79 46. 선진교통문화 정착과 내실화 도모 -- 80

주민숙원(건의)사업

43

❍ 주민생활과 영농에 불편이 많았던 농로개설 확․포장, 안길포장, 진입

로정비 등 각종사업으로 주민의 숙원을 해소

❍ 농촌지역의 생활환경개선 및 소득기반 확충으로 정주의욕 고취

□ 사업개요

❍ 년차별 투자내역

(단위:건/백만원)

계		2009년		2010년		2011계획
건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
457	22,234	125	4,920	158	7,904	174	9,410

❍ 2011년 세부사업 내역

(단위:건/백만원)

계	주민숙원	소규모 주민숙원	재정건의	안전사고 예방사업
174/9,410	36/3,863	85/3,347	28/2,000	25/200

□ 추진계획

❍ 주민건의 및 숙원사업에 대하여 사업의 효과 및 이용도 등 제반       여건 조사 후 우선순위에 따라 소요사업비 확정․시행

❍ 편입부지 희사승낙서 징구 및 이전등기 : 연중 시행

❍ 대상지 선정 : 2011. 1월 ～ 3월

❍ 주민설명회개최 및 실시설계 : 2011년 3월

❍ 사업시행 : 2011. 4월 ～ 12월

✍ 건설과    건설담당   (☎ 960-5191)

도로망 확충 사업

44

❍ 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축 및 군민생활편익 증진

□ 사업개요

❍ 군도 : 24개 노선, L=193.3km, 224,293백만원

❍ 농어촌도로 : 303개 노선, L=761.1km,  680,331백만원

□ 그간추진상황

(단위:km/백만원)

노선수	전체		기투자		2010년 시행		2011년 시행		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	954.4	904,624	380.5	299,529	6.4	4,422	9.1	5,532	558.4	595,141
군도	193.3	224,293	81.5	68,747	3.2	2,557	4.0	2,100	104.6	150,889
농어촌	761.1	680,331	299.0	230,782	3.2	1,865	5.1	3,432	453.8	444,252

□ 추진계획

❍ 사업내용

구분	사업명	위치	사업량 (km)	사업비(백만원)				비고
				계	기시행	2011년	장래
계	계		9.1	70,729	43,160	5,532	22,237
군도	본백~월평외 5건	함야읍외 4개면	4.0	50,835	35,109	2,100	13,626
농어촌	신각선외 9건	함양읍외 6개면	5.1	19,894	8,051	3,432	8,611

❍ 추진일정

- 실시설계 용역 및 설계보완 완료 : 2011. 1월 ～ 2월

- 토지보상 및 사업착공 : 2011. 3월 ~ 4월

- 사업시행 : 2011. 3. ～ 12월

✍ 건설과 도로담당  (☎ 960-5192)

백현권역 종합개발사업

45

❍ 농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민소득기반확충 등을      통해 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주공간을 조성하여 농촌지역의      주민들의 삶의 질 향상과 소득증진에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 백전면 경백리, 오천리 일원

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년(4년간)

❍ 사 업 량 : 기초생활기반확충사업 외 3개 사업

❍ 사 업 비 : 8,050백만원

(광특 4,669, 도비 1,070 군비 1,671 기타 313)

□ 그간추진상황

❍ 대평초등학교 매입 협의 완료 : 2009. 12

❍ 백현권역 종합개발사업 확정 : 2010. 08

❍ 기본계획 수립 용역 시행 : 2011. 03

□ 추진계획

❍ 대평초등학교 매입 : 2011. 03월

❍ 실시설계용역 실시 : 2011. 06월

❍ 주민역량강화(S/W)용역 실시 : 2011. 06월

❍ 군계획시설 결정 등 행정절차 이행 : 2011. 06월~ 08월

❍ 2011년 사업 착수 : 2011. 09월

✍ 건설과 농업기반 담당 (☎ 960-5193)

선진교통문화 정착과 내실화 도모

46

❍ 이용자 중심의 교통행정 시책 추진으로 교통편익 증진

❍ 체계적인 교통운영방안 개선으로 대중교통의 편리성 향상

❍ 경영개선과 군민 서비스 확대를 위한 운수업체 재정 지원

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2011. 01월 ～ 2011. 12월(연중)

❍ 사 업 량

- 대중교통시설 개선 및 군 이미지 홍보

☞ 버스승강장 설치사업 외 5개사업, 237백만원

- 교통안전시설물 설치 및 관리

☞ 교통신호등(경보등) 설치사업 외 2개사업, 93백만원

- 운수업체 재정지원

☞ 벽지노선 손실보상금지원 외 2개사업, 1,540백만원

- 교통관련 계획수립 연구용역 사업추진

☞ 대중교통계획수립 용역 외 2개사업, 70백만원

❍ 사 업 비 : 1,940백만원

□ 추진계획

❍ 계획수립 및 사업대상지 확정 : 2011. 02월한

❍ 실시설계 : 2011. 02월～04월

❍ 사업시행 및 완료 : 2011. 03월～12월

✍ 건설과 교통행정담당  (☎ 960-5194)