물레방아골 함양

재난관리과

47. 안전한 함양 만들기 ---------- 83 48. 자연재해 위험지구 정비 ------ 84 49. 위천 생태하천 조성사업 ------ 85 50. 밝은 거리 밝은 함양 만들기---- 86

안전한 함양 만들기

47

❍ 군민이 동참하는 안전점검으로 재난예방활동 효과 제고

❍ 안전을 최우선으로 하는 군민의식 함양

□ 사업개요

❍ 재난에 대비하는 안전관리계획 수립

❍ 재난 예방을 위한 군민 교육․홍보 강화

❍ 실효성 있는 사전 안전점검 활동 전개

❍ 사 업 비 : 22백만원

□ 그간추진상황

❍ 함양군 안전점검의 날 추진계획 수립 및 운영

- 매월 4일 안전점검의 날 지정 취약시설 안전점검 실시

❍ 설연휴대비 다중이용시설 안전점검 및 안전문화캠페인 실시

- 2011. 01. 01. ～ 01. 28, 25개소

❍ 해빙기대비 재난취약시설 안전점검 및 조치

- 2011. 02. 15. ～ 03. 15, 47개소,

❍ 안전사고 예방을 위한 저소득층, 노인가구 경운기야광판 설치

- 2011. 1월 ～ 3월, 208가구

□ 추진계획

❍ 특정관리대상 시설 조사관리 및 안전점검의 날 지속 추진

- 매년 9 ～ 11월중 특정관리대상 전수조사 ․ 등급관리

- 년 2회 이상 점검 실시 : 건축, 토목, 소방, 전기 등

❍ 여름철 물놀이 안전관리

- 물놀이 취약지역 : 타포린, 세이프라인, 소형 현수막 확대 설치

- 하천 권역별 물놀이 지도 인부사역, 물놀이 현장 가두방송

❍ 여름철, 추석명절, 동절기 등 군민대상 안전문화캠페인 실시

❍ 어린이 안전의식 제고를 위한 안전체험투어 실시 : 6월 중

✍ 재난관리과 재난관리담당  (☎ 960-5201)

자연재해 위험지구 정비

48

❍ 자연재해 위험지구에 대한 근원적인 예방대책 필요

❍ 상습침수지구 재해위험요인을 체계적, 지속적으로 정비관리

□ 사업개요

지구명	위치	사업량	사업비 (백만원)	사업기간
신안지구	안의면 신안리	호안 L=1.1km	4,150	2010.5～2011.10
보산지구	지곡면 보산리	호안 L=2.3km	7,800	2011.3～2012.12

□ 그간추진상황

신안지구	보산지구
◦2006. 2. 자연재해위험지구 지정 ◦2009. 9. 기본조사 및 설계 용역 ◦2010. 5. 사업착공	◦2010. 7. 자연재해위험지구 지정 ◦2010. 9. 기본조사 및 설계 용역 ◦2011. 3. 사업시행

□ 추진계획

❍ 신안지구

- 2011. 3 ～ 4월 : 교량설치

- 2011. 7월 : 축제 및 호안 마무리

- 2011. 9월 : 사업준공

❍ 보산지구

- 2011. 3월 : 편입토지 감정 및 사업착공

- 2011. 4월 : 금년분 토지보상금 및 선급금(최대 70%) 지급

- 2011. 12월 : 금년분 사업준공

✍ 재난관리과 복구지원담당 (☎ 960-5202)

위천 생태하천 조성사업

49

❍ 훼손된 하천환경을 자연 상태로 복원하여 하천이 지닌 본래의

자연성과 생태적 기능이 최대화 될 수 있는 친환경적 하천조성

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 함양 위천 생태하천 조성사업

❍ 위    치 : 함양읍 용평리(하림숲)～죽곡리(솔숲)

❍ 사 업 량 : 생태하천 조성 L=4.93km

❍ 사 업 비 : 금15,800백만원(국비60%,도비20%,군비20%)

연 도 별 사 업 비(백만원)					비고
계	2009	2010	2011	2012이후
15,800	1,000	4,166	2,000	8,634

□ 그간추진상황

❍ 2009.03 : 함양 위천 생태하천 조성사업 지구 선정

❍ 2010.05 : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2010.12 : 사업발주(총괄분)

□ 추진계획

❍ 사업착공 : 2011. 3월

❍ 사업준공 : 2011. 12월

✍ 재난관리과 하천담당  (☎ 960-5203)

밝은 거리 밝은 함양 만들기

50

❍ 고장 및 노후 가로등의 신속한 조치로 주민불편 최소화

❍ 밝은 거리로 깨끗하고 밝은 함양 이미지 창출

□ 사업개요

❍ 가로등고장, 신ㆍ이설 등 신속한 민원처리로 주민불편 최소.

❍ 노후 가로등 적기 정비로 사고예방 및 밝은 도심 거리조성

❍ 사 업 비 : 90백만원

□ 그간추진상황

❍ 마을입구(진입로) 가로등 설치 : 2011. 2월, 38개마을 42개소

❍ 마을도로 가로등 신.이설 : 2011. 2월～3월, 17개마을 26개소

□ 추진계획

❍ 가로등 관련 주민불편 민원 신속한 처리(90백만원)

- 가로등 사전점검 실시로 주민불편 예방(가로등 : 4100개)

- 주민의견을 적극 수렴하여 가로등 신ㆍ이설 (20개소)

❍ 타 부서 설치 가로등 관리

- 대    상 : 도시계획, 공원, 관광지 타부서 설치 가로등

- 관리방안 : 기존시설 보수지원, 신규사업 시 설계ㆍ시공ㆍ                    준공에 참여

✍ 재난관리과 민방위담당  (☎ 960-5204)