물레방아골 함양

도시환경과

51. 함양의 비엔나 문화거리 조성 -- 89 52. 함양 대대들 근린공원 조성사업 -- 90 53. 깨끗한 공중화장실 유지관리 --- 92 54. 폐기물 종합처리시설 조성사업 ---- 93 55. 효율적 생활쓰레기 수거․처리 ----- 94

함양의 비엔나 문화거리 조성

51

- 색(꽃)과 빛(조명)과 소리(음악)와 낭만(사랑)의 조화 -

❍ 년 2백만 외래객이 내방하는 천년의 숲 ‘상림’과 연계

❍ 함양읍 시가지 공공시설물 등 정비, 심미적 기능적 가치 고양

❍ 오스트리아의 비엔나처럼 세계적인 문화거리조성 관광자원화

□ 사업개요

❍ 사업구간 : 동문 4거리 중심 십자로 방향(L=2Km)

❍ 사 업 비 : 400백만원(국300, 군100) ※ 총사업비 15억원

❍ 사업내용 : 공공 공간, 공공매체, 공공시설 등 정비

- 벽면녹화(한 상가 한 화분 설치) : 400개소

- 음악이 있는 테마거리 조성 : 스피커 설치 80개소, 2km

- 함양상징 랜드마크 조형물 건립 : 1개소

- 가로 휴게쉼터 및 광장 조성 : 3개소

- 가로지주 통합감축(표지판,가로등,신호등 등) : 30개소(2012년)

- 각종 구조물 정비(휴지통,맨홀,벤치,가드레일 등) : 10개소(2012년)

- 간판정비(개인욕구,대중편이,공공쾌적성 조화) : 50개소(2012년)

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2012년

□ 추진계획

단계별	항 목	세부추진내역	추진일정
준비단계	자료조사	•방향구상, 사업량 조사, 선진지 견학	2011. 1~2월
	업체선정	•실시설계 및 도급업체 선정	2011. 3~4월
추진(시행) 단 계	세부사업별 추 진	•함양 랜드마크 조형상징물 현상공모	2011. 5~7월
		•벽면녹화 및 음악거리 조성	2011. 5~9월
		•가로 휴게쉼터 조성	2011. 7~9월
		•랜드마크 상징조형물 건립	2011. 9~12월
사후관리 단 계	성과분석	•세부사업별 성과분석 및 환류 •2012년 사업 구상	2011. 12월

✍ 도시환경과 도시계획담당 (☎ 960-5211)

함양 대대들 근린공원 조성사업

52

❍ 함양 위천(지방하천)을 중심으로 동쪽은 상림숲과 서쪽은 대대들이

어우러져 있어 대대들을 상림숲, 솔숲, 어린이공원과 연계가 되도록

근린공원으로 조성함으로서 청정함양 이미지 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 함양읍 죽곡리 일원

❍ 사 업 량 : 공원조성 A=230,000㎡

- 세부시설 : 수목식재, 분수광장, 자연학습장, 시비공원 등

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년

❍ 사 업 비 : 40,000백만원(도20,000, 군20,000)

□ 추진계획

❍ 모자이크 프로젝트사업 추진 및 확정 : 경남도(2011. 3월예정)

- 군비 등 예산확보(제1회추경)

❍ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	‘11년도	’12년도	’13년도	’14년 이후
계	40,000	6,000	10,000	10,000	14,000
도 비	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
시군비	20,000	1,000	5,000	5,000	9,000

❍ 기본계획수립용역 시행

- 주민설명회 개최

- 보상조서 작성 및 감정평가 실시

❍ 도시관리계획결정용역(생산녹지지역⇒근린공원) 및 실시 설계용역 시행 : 2011년 시행

- 도시관리계획 작성 및 입안

․ 결정도서, 환경․교통․재해영향평가, 문화재 지표․발굴  조사, 각종 인허가 서류 등

․ 생산녹지지지역(200,000㎡정도) ⇒ 자연녹지지역(근린공원)

- 관련 기관및부서 협의 : 농지전용(농업진흥구역 해제) 등

․ 농업진흥구역 해제

․ 일부면적 문화재 보호구역으로서 현상변경허가 협의

․ 상수원 보호구역, 연접구역으로서 환경영향평가 등 협의

- 경남도 도시계획위원회 심의

❍ 2012. 12월 : 시설공사 착공

❍ 2014. 12월 : 준공

※ 도비 200억원, 군비 200억원 재원은 전실과소 유사사업을

대대들내(모자이크사업) 포함하여 시행 계획

✍ 도시환경과 도시개발담당  (☎ 960-5212)

깨끗한 공중화장실 유지관리

53

❍ 공중화장실 확충 및 불량시설 개선을 통한 이용객 편의제공

❍ 상시 청결․위생 관리 및 이용물품 비치로 쾌적한 환경제공

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2011. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 819백만원

❍ 추진방향

- 주요 관광지 공중화장실 확충 및 노후시설 개선

- 정기 및 수시점검을 통한 부적합시설 개․보수

- 청소 및 시설물관리 민간위탁 추진으로 상시 청결상태 유지

-  각종 위생용품 및 편의용품 비치로 최적의 이용 환경조성

□ 추진계획

❍ 주요 관광장소 및 다중이용 장소 공중화장실 확충

- 신축대상 : 휴천 동강마을 공중화장실 외 3개소

- 사 업 비 : 520백만원

❍ 공중화장실 정기점검 및 부적합시설 개․보수

- 관리대상 : 122개소, 68백만원(연중 지속추진)

- 추진사항 : 정기(수시)점검을 통한 부적합시설 개․보수

❍ 공중화장실 청결유지 및 시설물관리 민간위탁 추진

- 관리대상 : 73개소, 150백만원

❍ 공중화장실 환경미화 및 각종 표찰 제작 : 17백만원

- 관광액자, 인조 꽃, 이용안내판, 남(녀)․장애인 표지판 등

❍ 공중화장실 청결유지 및 위생관리 용품 비치 : 64백만원

- 분뇨․정화조청소, 편의용품․위생용품․청소용품 구입 등

✍ 도시환경과 환경관리담당  (☎ 960-5213)

폐기물 종합처리시설 조성사업

54

❍ 생활폐기물의 장기적이고 안정적인 종합처리(관리) 체계 구축

❍ 폐기물의 위생적․안정적 처리로 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

(단위:백만원)

구 분	사 업 량	사업기간	사 업 비					비고
			계	국비	도비	군비	기금
계	3 종		19,450	5,335	550	13,115	450
매립시설	-매립시설 110천㎥ -침출수 처리시설 1식	2009.6. ~2011.10.	10,000	1,500		8,500
소각시설	-소각시설 신설 20톤/일 ․생활쓰레기 15톤/일 ․하수찌꺼기 5톤/일	2011. 7. ~ 2012.11.	7,450	3,235	150	3,615	450
재 활 용 선별시설	-재활용 선별시설 1동	2010.5. ~ 2011. 9.	2,000	600	400	1,000

□ 그간 추진상황

❍ 2008. 3월 : 군관리계획(폐기물, 도로, 녹지) 변경 결정

❍ 2009. 5월 : 폐기물 처리시설 기본 및 실시설계 완료

❍ 2009. 6월 : 생활폐기물 처리시설 공사 시행

❍ 2010. 5월 : 재활용품 선별시설 설치공사 시행

❍ 2011. 1월 : 소각시설 설치 한국환경공단 대행 협약 체결

□ 추진계획

❍ 2011. 10월 : 생활폐기물 매립시설 설치공사 준공

- 1차분 2011. 5월 준공, 2차분 2011. 10월 준공

❍ 2011. 7월  : 소각시설 설치공사 착공(준공 2012. 11월)

❍ 2011. 9월  : 재활용품 선별시설 설치 공사 준공

✍ 도시환경과 환경정비담당 (☎ 960-4168)

효율적 생활쓰레기 수거․처리

55

❍ 폐기물 처리시설 효율적 운영으로 생활폐기물 안정적 처리

❍ 올바른 생활쓰레기 배출 및 수거문화 정착으로 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 폐기물처리시설 효율적 운영

❍ 세련된 청소행정 시스템 구축

❍ 생활쓰레기 배출 및 수거체계 정비

❍ 음식물쓰레기 발생억제로 낭비 없는 음식문화 정착 체계 마련

□ 추진계획

❍ 폐기물처리시설 효율적 운영

- 소각로 백필터 교체 등 주기적 유지보수로 소각률 향상 및 매립장 사용 증대

- 주기적 복토 및 방역 실시로 친환경적 매립시설 관리

❍ 세련된 청소행정시스템구축으로 청결한 청소 이미지 제고

- 노후 청소차량 교체 : 2대(압축진개차 2대, 음식물쓰레기전용 1대)

- 월 1회 청소관련종사자 교육 실시로 청소서비스 개선능력 제고

❍ 생활쓰레기 배출 및 수거체계 정비로 올바른 생활폐기물 배출 및 수거문화 정착

- 재활용품 「공동수거의 날」 지정 운영 : 매주 화․목요일 지정 배출

- 재활용품 분리수거함 정비 및 신규 설치 : 30조, 9,000천원

- 월 1회 배출시간 준수 및 재활용품 분리배출 지도․홍보 강화

❍ 음식물쓰레기 발생억제 시책추진 체계 마련

- 2011. 상반기 : 음식물류 폐기물관련 조례 개정

- 2011. 하반기 : 음식물쓰레기 종량제(칩방식) 시범 실시

(공동주택 및 음식점 20개소)

✍ 도시환경과 폐기물관리담당  (☎ 960-5215)