물레방아골 함양

상하수도사업소

75. 깨끗하고 풍부한 마을상수도 공급 ---- 127 76. 맑고 안정적인 지방상수도 공급 ----- 128 77. 부영양화 방지 등 수질개선 사업추진 --- 129

깨끗하고 풍부한 마을상수도 공급

75

❍ 농촌지역 인구 노령화에 따른 마을상수도시설 전문업체 위탁관리로 안전한 생활용수 공급

❍ 긴급보수, 노후, 원수부족, 수질불량 시설에 대한 시설정비 및 암반관정 개발로 생활용수의 안정적 공급과 군민 보건 향상 기여

□ 사업개요

구 분	사업량 및 내용	사업비 (백만원)	추진기간	비 고
마을상수도 유지관리사업	▪전읍면 마을상수도(273개소) 위탁관리 및 긴급유지보수 ▪연장허가 및 사후관리 32개소	922	1～12월
소규모 수도시설 개량사업	▪수동내산외 6개지구 소규모 수도시설개량	1,562	1～12월
농촌농업생활용수 개발사업	▪함양남산외 4개지구 관정개발 및 이용시설정비	1,100	1～12월

□ 추진계획

단계별	세부추진내역			추진일정
준비 단계	•소규모수도시설개량 및 농촌농업생활용수개발 등 사업대상지 조사 및 선정			2011년 중
추진 (시행)	•위탁관리 - 설계도서 작성 및 업체선정(2월) - 위탁관리비[선급금(3월) 및 준공금(12월)] 집행 •사후관리 및 연장허가 - 설계도서 작성 및 업체선정(3월) - 사업시행[선급금(3월) 및 준공금(6월)] 집행	•소규모수도시설개량 - 실시설계(1~3월) - 업체선정(3월) - 각종 편입부지 동의서 징구 및 행정절차 이행(3~8월) - 사업시행[선급금(3월) 및 준공금(10월) 집행] •마을급수시설 긴급복구 발생 시 즉시 조치(연중시행)	•농촌농업생활용수개발 - 지하수기초 및 영향조사(1~5월) - 실시설계(5~6월) - 업체선정(6월) - 각종 편입부지 동의서 징구 및 행정절차 이행(6~9월) - 사업시행[선급금(6월) 및 준공금(11월)집행]	2011.2~11월
사후 관리	•마을급수시설 지속적인 유지관리			지속

✍ 상하수도사업소 관리담당  (☎ 960-5231)

맑고 안정적인 지방상수도 공급

76

❍ 기후변화로 인한 갈수기 상수원 고갈 대비 풍부한 지방상수도

상수원 확보 및 누수율 제고로 지방상수도 보급률 향상

❍ 먹는 물로 인한 주민불편 해소 및 보건위생 향상

□ 사업개요                            (단위 : 백만원)

구 분		사업량 및 내용	사업비	추진기간	비 고
지방상수도 상수원 확보		대체관정 33공	10	연중
지방상수도 유수율 제고		노후관로 교체 21㎞ 누수탐사 용역 1식	613	1～8월	사업추진 ‘07～‘14
지방상수도 보급률 제고	서상농어촌 지방상수도 개발사업	V = 643천㎥ Q = 3,700㎥/일	5,008	1～12월	사업추진 ‘06～‘14
	지방상수도 급수구역 확대사업	배수관로 L = 5㎞	799	1～8월	사업추진 ‘10～‘11

□ 그간추진상황

❍ 서상 지방상수도 개발사업 : 수원시설 완료

❍ 노후관로 교체사업 : 8㎞

❍ 급수구역 확대사업 : 본백, 신기, 부야 207세대

□ 추진계획

❍ 지방상수도 상수원 확보

- 대체관정 점검 및 보수 : 분기 1회

- 한국농어촌공사 협조체계 구축(소류지 2만㎥ 보조수원공 활용)

❍ 지방상수도 유수율 제고

- 물 절약 홍보 5종(전단지, 현수막, 문자, 홈페이지, 반상회보)

- 노후관로 2㎞(함양 1.3, 안의 0.7) 교체로 누수 방지

- 누수탐사 용역 및 신속 복구로 유수율 향상(68% ⇒ 74%)

❍ 지방상수도 보급률 제고

- 서상 지방상수도 신규 개발 추진

취수탑(기계, 전기) 설치, 정수장 구조물 5동 설치

- 함양･안의 지방상수도 급수구역 확대 추진

지곡면 정취･신영, 안의면 두항･마암 4개 마을 배수관로 설치로

239세대 550명 지방상수도 공급 ⇒ 보급률 향상(51.3 ⇒ 53%)

✍ 상하수도사업소 상수도담당  (☎ 960-5232)

부영양화 방지 등 수질개선 사업추진

77

❍ 환경기초시설인 총인처리시설을 설치 4대강의 조류발생억제

❍ 부영양화 방지 등 수질개선을 도모, 방류수 수질기준(TP) 충족

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 외 2개면

❍ 사업기간 : 2010. 2 ~ 2011. 8

❍ 사 업 량 : 총인처리시설 3개소 설치

❍ 사 업 비 : 2,158백만원                           (단위 : 백만원)

처리장명	규 모 (㎥/일)	처리공법	사 업 비
			계	2010년	2011년
계	3개소		2,158	658	1,500
함 양	7,000	가압부상 공법 (에코젯 그린플러스)	1,293	497	796
안 의	900	하향류식 급속여과	451	85	366
수 동	800	하향류식 급속여과	414	76	338

□ 그간추진상황

❍ 2010. 2 ～ 5 : 실시설계 및 공법선정

❍ 2010. 8 : 실시설계 완료

❍ 2010. 9 ～ 10 : 공공하수처리시설 변경인가 신청ㆍ재원 협의ㆍ

설계(기술) 검토 협의

❍ 2010. 11 : 계약심사 및 공사입찰ㆍ계약

❍ 2010. 12 : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2010. 12 ～ 2011. 5 : 토목공사 및 총인처리설비 설치

❍ 2011. 5 : 설치 완료

❍ 2011. 6 ～ 8 : 시운전 및 준공

✍ 상하수도사업소  하수도담당 (☎ 960-5233)