부서		건설교통과
시책별가중치		시책 번호	담당	시책명	사업비	가중치
			계		16,768	1
		41	건설	주민숙원(건의)사업	5,320	0.4
		42	도로	도로망 확충사업	3,545	0.2
		43	농업기반	권역단위종합개발사업	3,998	0.2
		44	교통행정	대중교통체계 선진화를 위한 인프라 구축	3,905	0.2

시책번호	41	분야	활력있는 창조경제		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	건설교통과		담 당	건설	전화번호	960-5191
시 책 명	주민숙원(건의)사업

□ 사업개요

계		2012년		2013년		2014계획
건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
585	17,309	164	6,150	198	5,839	223	5,320

❍ 연차별 투자내역                                   (단위 : 건/백만원)

❍ 2014년 세부사업 내역                                   (단위 : 건/백만원)

계	주민숙원	소규모 주민숙원	주민참여 예산	안전사고 예방사업
223/5,320	101/2,530	87/2,070	15/620	20/100

□ 추진계획

❍ 대상지 선정 : 2014. 1월

❍ 실시설계 작성 : 2014. 1 ~ 2월

❍ 사업시행 및 준공 : 2014. 3월 ~ 10월

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
실시설계	1월중		30%
사업발주 및 착공	2~3월중		20%
사업추진	1차 : 6월내60%준공 2차 : 7월내80%준공		30%
사업완료	10월중		20%

시책번호	42	분야	활력있는 창조경제		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	건설교통과		담 당	도로	전화번호	960-5192
시 책 명	도로망 확충사업

□ 사업개요

❍ 군   도                                           (단위 : km/백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	기시행	2014년	장래
계	4개소	4.7	13,220	2,160	1,769	9,291
함양~국계(군도6호)	유림 국계	1.3	2,600	600	400	1,600
원구~거면(군도4호)	함양 구룡	1.2	2,760	260	400	2,100	계속
구룡~옥환(군도9호) (원산~지소)	병곡 원산	1.2	2,760	600	269	1,891	계속
도천~구라(군도16호)	병곡 월암	1.0	5,100	700	700	3,700	특교

❍ 농어촌도로                                         (단위 : km/백만원)

사업명	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	기시행	2014년	장래
계	8개소	7.4	14,300	3,616	1,776	8,908
정개선	지곡 보산	0.8	3,100	1,616	300	1,184	계속
미금선	휴천 대천	0.6	1,400	900	200	300	계속
가덕선	마천 가흥	0.6	1,600	400	300	900	계속
동상선	안의 신안	1.0	1,500	500	300	700	계속
대포선	휴천 대천	0.4	600	200	100	300	계속
대안선	백전 대안	0.6	1,000	-	193	807	실시설계
실도선(도마)	마천 덕전	1.6	2,400	-	190	2,210	실시설계
대웅선	유림 대궁	1.8	2,700		193	2,507	실시설계

□ 추진계획

○ 추진일정

- 2014. 1. ∼ 2014. 8월 : 실시설계 용역 시행

- 2014. 3. ∼ 2014. 4월 : 사업시행

- 2014. 11월 : 사업완료

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계	12건		100%	46%
함양~국계(군도6호선)	진도 30%		8%	2%
원구~거면(군도4호)	보상완료		8%	5%
원산~지소(군도9호)	토지보상		8%	3%
도천~구라(군도16호)	토지보상		12%	6%
정개선	진도80%		8%	5%
미금선	진도60%		8%	5%
가덕선	준공		8%	3%
동상선	진도60%		8%	3%
대포선	보상완료		8%	2%
대안선	설계완료		8%	4%
실도선(도마)	설계완료		8%	4%
대웅선	설계완료		8%	4%

시책번호	43	분야	활력있는 창조경제		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○	○
부 서 명	건설교통과		담 당	농업기반	전화번호	960-5193
시 책 명	권역단위 종합정비사업

□ 사업개요

❍사업현황

(단위:백만원)

구 분	위 치	사업 기간	사 업 비				사업내용	비 고 (시행처)
			합계	기투자	2014년	’15년 이후
계	5개소		21,456	7,670	3,998	9,788
백현권역	백전면 경백리 오천리	’11~’14	7,136	6,054	1.082		기초생활기반확충외 3개사업	직영
오매실권역	백전면 구산리 대안리	’12~’15	3,140	1,043	1,784	313	기초생활기반확충외 3개사업	농어촌공사 위탁
봉전권역	서하면 봉전리	’13~’16	4,247	573	429	3,245	기초생활기반확충외 3개사업	농어촌공사 위탁
삼동권역	병곡면 옥계리	’14~’17	3,432		348	3,084	기초생활기반확충외 3개사업	직영
죽림권역	함양읍 죽림리	’14~’17	3,501		355	3,146	기초생활기반확충외 3개사업	농어촌공사 위탁

❍ 사 업 량 : 권역단위 종합정비사업 5개소

❍ 총사업비 : 21,456백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

□ 추진계획

❍ 백현권역 대평두레원 위탁 운영 : 2014. 12월

❍ 오매실권역 하드웨어(H/W)공사 시행 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월

❍ 봉전권역 시행계획 승인 : 2014. 10월

❍ 봉전권역 하드웨어사업 착수 : 2014. 11월

❍ 삼동권역 기본계획 승인 및 실시설계 발주 : 2014. 10월

❍ 죽림권역 기본계획 승인 및 실시설계 발주 : 2014. 10월

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
백현권역	회관신축 1동, 회관리모델링 6동		30%
오매실권역	커뮤니센터 준공 12월중		30%
봉전권역	시행계획 수립 10월중		20%
삼동권역	기본계획 수립 10월중		10%
죽립권역	기본계획 수립 10월중		10%

시책번호	44	분야	활력있는 창조경제		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	건설교통과		담 당	교통	전화번호	960-5194
시 책 명	대중교통체계 선진화를 위한 인프라 구축

□ 사업개요

계		2012년		2013년		2014계획
건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
41	9,117	10	2,351	14	2,861	17	3,905

❍ 연차별 투자내역                                (단위:건/백만원)

❍ 2014년 세부사업 내역                             (단위:건/백만원)

계	대중교통시설	교통안전 시설물	운수업체 재정지원	특별교통 수단
17/3,905	5/256	5/320	4/2,783	3/546

□ 추진계획

❍ 대상지 선정 : 2014. 2월

❍ 실시설계 용역 : 2014. 2 ～ 4월

❍ 사업시행 및 준공  : 2014. 3월 ～ 12월

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
실시설계	2-4월중		30%
사업발주 및 착공	3~4월중		20%
사업추진	1차 : 6월내 60%준공 2차 : 7월내 70%준공		30%
사업완료	12월중		20%