부서		도시환경과
시책별가중치		시책 번호	담당	시책명	사업비	가중치
			계		944	1
		49	도시계획	간판이 아름다운 거리 조성사업 추진	200
		50	도시개발	도시생활 기반시설 친환경정비사업	106
		51	환경관리	자연환경보전 및 야생동물 보호	63
		52	환경정비	공중화장실 청결 관리	503
		53	폐 기 물 관 리	생활쓰레기 적기 수거 및 자원재활용 추진	72

시책번호	49	분야	찾고싶은 문화관광		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	도시환경과		담 당	도시계획	전화번호	960-5211
시 책 명	간판이 아름다운 거리 조성사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 안의면 시가지 일원

❍ 기    간 : 2014. 4 ~ 2014. 12

❍ 사 업 량 : 65개 업소, 121개 간판 정비(330m)

❍ 사 업 비 : 200백만원

□ 추진계획

❍ 주민설명회 및 주민협의체 구성 : 2014년 4월 ~ 5월

❍ 간판 가이드라인 및 디자인 용역 : 2014년 5월~6월

❍ 간판 시범사업 착공 : 2014년 7월

❍ 간판 시범사업 준공 : 2014년 11월~12월

❍ 광고물등 정비시범구역 지정 : 2014년 12월

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
주민협희체 구성	1회(5월중)		25%
디자인 용역완료	2개소(6월중)		25%
아름다운 간판 준공	65개소, 330m (12월중)		50%

시책번호	50	분야	활력있는 창조경제		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
						○
부 서 명	도시환경과		담 당	도시개발	전화번호	960-5212
시 책 명	도시생활 기반시설 친환경 정비사업

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 양지맨션 일원

❍ 사 업 량 : 노후 울타리 철거 및 조경(L=100m)

❍ 사 업 비 : 106백만원

□ 추진계획

❍ 실시설계 : 2014. 4월

❍ 주민설명회 : 2014. 4월

❍ 착공 및 준공 : 2014. 5월 ~ 2014. 7월

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
실시설계완료	4월중		30%
사업착공	5월중		20%
사업추진	화단조성L=100m		30%
사업완료	7월중		20%

시책번호	51	분야	미래지향 가치농업		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○	○
부 서 명	도시환경과		담 당	환경관리	전화번호	960-5213
시 책 명	자연환경보전 및 야생동물 보호

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014년 연중

❍ 야생동물 보호 및 농가피해 예방

- 피해예방사업 : 20농가, 38백만원

- 피해보상사업 : 30농가, 25백만원

❍ 배출업소 등 지도․점검 강화로 쾌적한 자연환경조성

□ 추진계획

❍ 야생동물 보호 및 밀렵․밀거래 방지 : 연중(합동실시 1회)

- 부상 야생동물 구조, 불법 엽구 수거, 밀렵․밀거래 수시 단속

❍ 농작물 피해 보상 및 예방시설 설치 : 63백만원

❍ 환경오염물질 배출시설 등 통합지도․점검 : 연중 161개소

❍ 환경신문고 운영 및 민관합동 감시반 운영

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
야생동물 먹이주기 및 불법 엽구수거 민관 합동실시	1회		10%
피해보상 및 예방시설 지원	63백만원 지원		40%
배출시설 지도 점검	161회		40%
민관합동 감시반 운영	1회		10%

시책번호	52	분야	찾고 싶은 문화관광		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	도시환경과		담 당	환경정비	전화번호	960-5214
시 책 명	공중화장실 청결 관리

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014년 연중

❍ 대    상 : 군 관내 77개소

❍ 사 업 비 : 503백만원

□ 추진계획

❍ 공중화장실 신축 : 1개소, 150백만원

❍ 노후 화장실 철거 : 1개소, 20백만원

❍ 이동식화장실 구입․설치 : 12동, 30백만원

❍ 민간위탁관리비 : 171백만원(77개소)

❍ 시설 개․보수 및 편의용품 구입 : 132백만원(77개소)

□ 평가지표

항 목		2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계				100%
신축 및 철거	실시설계용역	3월중		10%
	사업착공	5월중		10%
	사업추진	신축 1동 철거 1동		20%
	사업완료	6월중		10%
민간위탁관리, 시설 개보수 및 유지 관리	민간위탁	1월중		20%
	시설개.보수 및 편의용품 비치	분기별 실시		15%
	이동식화장실 구입.설치	6월중		15%

시책번호	53	분야	신뢰받는 공감행정		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○	○
부 서 명	도시환경과		담 당	폐기물관리	전화번호	960-5215
시 책 명	생활쓰레기 적기 수거 및 자원재활용 추진

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014년 연중

❍ 수 거 량 : 28톤/일(가연성 7, 불연성 13, 음식물 5, 재활용 3)

❍ 수거인력 : 46명(공무원 11, 미화원 29, 기타 6) ➩ 차량 12대

□ 추진계획

❍ 생활쓰레기 수거 및 자원재활용 체계 구축

- 시설 장비 사전 점검 및 배출지점 보수(20개소)

- 재활용품 수집장려금 지급(72백만원) : 14년 12월

- 재활용품 수집 우수 읍면 시상 : 14년 12월

【최우수 1(1,000천원), 우수 1(500천원), 장려 2(600천원)】

❍ 음식물 쓰레기 분리 배출 확대 및 감량화 추진

- 음식물쓰레기 수거 일자 확정 시행 : 주 3회(월.수.금)

- 일반음식점 전용용기종량제 확대 시행 : 100개소→135개소

- 음식물쓰레기 줄이기 운동 지속적 전개 : 단체,부녀회 등

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
쓰레기 배출지점 개선	시설 개선 20개소		25%
재활용품 수집 목표 설정	1,670톤/년		50%
음식물 종량제 확대 시행	100개소 →135개소		25%