휴 양 밸 리 산 업 과

부서명	휴양밸리산업과	담 당	시설관리담당 김병순	담당자	이득수 (☏5223)

산삼휴양밸리 조성사업

□ 청정 함양 산양삼을 산악관광과 접목시켜 휴양치유 복합관광 단지를 조성함으로써 산촌지역의 새로운 경영수익사업 모델 창출

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2012년 ~ 2018년

□ 위    치 : 병곡면 광평리

□ 소요예산 : 25,000백만원(도비 20,000, 군비 5,000)

□ 사 업 량

- 모노레일 설치 L=3.95㎞,

- 상․하부 승강장 1,263㎡(3층, 건축면적 939㎡)

- 진입도로 정비 L=2.5㎞, 주차장 및 기반정비 A=52,400㎡(507대)

□ 추진계획

❍ 2018.  3월 : 모노레일 상부승강장 설치공사 시행

❍ 2018.  5월 : 진입도로 및 주차장 정비공사 준공

❍ 2018.  7월 : 모노레일(우안 L=1,98㎞) 설치 준공

❍ 2018.  9월 : 상하부 승강장 및 모노레일(L=3.95㎞) 준공

❍ 2018. 10월 ~ 12월 : 개장준비 및 임시운영

❍ 2019.  1월 : 전면 개장

□ 평가지표

성과지표(단위)	2018년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계					100
① 사업비 집행 실적	5,637	(예산집행액/ 예산현액)*100	30	지방재정관리시스템	30
② 모노레일 설치 실적	100%	(설치 거리/ 계획 거리)*100	30	사업 준공도서	30
③ 신속집행 실적	60%	(예산집행액/ 예산현액의 60%)*100	20	지방재정관리시스템	20
④ 모노레일 개장 준비	100%	개장준비 여부	20	운영계획수립 보고서	20

부서명	휴양밸리산업과	담 당	시설운영담당 김군규	담당자	김군규 (☏4052)

환경성질환 예방관리센터 조성사업

❍ 환경유해인자로 인한 질환을 체계적으로 예방 관리, 치유를 통해 국민건강 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년

❍ 위    치 : 병곡면 광평리

❍ 사 업 량 : 예방관리센터(지하1/지상2층 연면적 2,503㎡), 기반정비 1식

- 치유시설 : 검사실, 상담실, 진료실, 산약초 테라피탕, 찜질방

- 교육/놀이시설 : 어린이 교육실․활동실, 다목적강당

- 지원/숙박시설 : 휴게실, 사무실, 객실(52명 수용)

❍ 사 업 비 : 7,340백만원(국비 3,500, 도비 1,400, 군비 2,440)

※ 2018년 : 340백만원

□ 추진계획

❍ 2018.  3월 : 내부인테리어, 부대 정비공사 착공

❍ 2018.  6월 : 내부인테리어, 부대 정비공사 준공

❍ 2018. 10월 : 센터 시범운영

□ 평가지표

성과지표(단위)	2018년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계					100
① 개장 물품 준비	100%	(예산집행액/ 예산현액)*100	30	지방재정관리시스템	30
② 실내인테리어 공사 진행률	100%	(예산집행액/ 예산현액)*100	30	지방재정관리시스템	30
③ 주변 정비 공사 진행률	100%	(예산집행액/ 예산현액)*100	30	지방재정관리시스템	30
④ 신속집행 실적	60%	(예산집행액/ 예산현액의 60%)*100	10	지방재정관리시스템	10