산림녹지과

	<목 차>
Ⅰ. 2013년 업무추진 방향 ------------------ 163 Ⅱ. 2013년 주요업무계획 ----------------- 165 ❏ 푸르고 아름다운 녹색경관 조성 ---------------- 167 ❏ 아름다운 테마 가로수길 조성 ------------------ 168 ❏ 남덕유산 주차장 조성 ------------------------ 169 ❏ 현장 중심의 산불방지대책 추진 ---------------- 170 ❏ 친환경적인 대봉산 생태숲 조성 ---------------- 171 ❏ 자연 친화적인 숲가꾸기 사업 ----------------- 172 ❏ 안전하고 즐거운 등산문화조성 ----------------- 173 ❏ 자연친화적 임도․사방댐 건설 ----------------- 174 ❏ 불로장생 산삼 휴양밸리 조성 ----------------- 175 ❏ 대단위 산림경영복합단지 조성 ----------------- 176 ❏ 산림청 공모사업 추진 ------------------------- 177 ❏ 제10 함양 산삼축제 개최 ---------------------- 178 Ⅲ. 특수시책 ---------------------------- 179 ❏ 하림 자생식물원 조성 ------------------------ 181 ❏ 지리산 둘레길 안내센터 건립 ------------------ 182 ❏ 치유의 숲 조성 ------------------------------ 183 ❏ 환경성 치유센터 조성 ------------------------- 184 ❏ 산림생태․문화체험단지 조성 ------------------- 185 ❏ 목재문화 체험장 조성 -------------------------- 186 ❏ 가족숲길 조성사업 -------------------------- 187 ❏ 산양삼가공식품 육성사업(향토산업) ------------- 188

Ⅰ. 2013년 업무추진 방향

“산에 돈이 있다”

	기 본 방 향
❍ 저탄소 녹색성장의 기반구축으로 산림의 공익적 기능 증진 ❍ 경제적 가치가 있는 녹색 숲 확충 ❍ 삶의 질 향상을 위한 산림휴양 문화기반 확충 ❍ 확실한 산지소득 기반 확보

	중 점 시 책
❍ 주변 경관과 어울리는 녹지 네트워크 구축 ❍ 지속적인 산림보호와 육성으로 저탄소 녹색성장 기반 조성 ❍ 완벽한 산불방지로 산림경관 창출 ❍ 친환경적인 산림휴양시설 확충 ❍ 산림을 이용한 관광 함양 기반 조성 ❍ 산양삼 세계화를 위한 산삼엑스포 기반 구축 ❍ 산림 소득 창출 전략 품목 육성

Ⅱ. 주요업무계획

푸르고 아름다운 녹색 경관 조성

❍ 지역별 아름다운 꽃길 조성으로 다양한 볼거리 제공

❍ 녹색 경관 지속 추진으로 다시 찾는 함양 기반 조성

□ 개    요

❍ 사 업 비 : 751백만원(국비 38, 도비 65, 군비 648)

❍ 사업내용

- 시가지 다리난간 및 화분 꽃 식재(1km 100백만원)

- 읍면 꽃길․꽃동산 조성 및 사후관리(115km 197백만원)

- 학교숲 조성(1개소 60백만원), 소공원 조성(1개소 80백만원)

- 도로변 소공원 및 가로수 사후관리(60개소 240백만원)

- 하림공원, 산림경영모델 숲 사후관리(5명 60백만원)

- 도시녹지관리원 사역(1명 14백만원)

❍ 사업기간 : 2013. 2월 ~ 2013. 12월

□ 추진계획

❍ 시가지 다리난간 및 화분 꽃 식재( 분기별) : 함양, 안의

❍ 주요 도로변 꽃길, 꽃동산 조성

- 읍면별 선호 초화류 2~3종( 구절초, 금계국, 설악초 등 )

❍ 도로변 소공원(60개소) 및 가로수(28천본) 사후관리

❍ 하림공원 및 산림경영모델 숲 사후관리

- 제초, 덩굴류제거, 비료주기 등으로 수목 및 초화류 지속관리

❍ 학교숲 조성(위치/사업비) : 안의중학교/ 60백만원

소공원 조성(위치/사업비) : 서상 도로변/ 80백만원

□ 기대효과

❍ 군민을 위한 충분한 휴식 공간 확보 및 쉼터 제공

❍ 푸르고 아름다운 함양 이미지 창출

✍ 산림녹지과 녹지공원담당(☏ 5171)

아름다운 테마 가로수길 조성

❍ 관내 도로별 특색 있는 수목 식재로 명품 가로수길 조성

❍ 녹색 가로수길 조성으로 쾌적한 가로 환경 및 청정 함양

이미지 제공

□ 개    요

❍ 대    상 : 관내 주요 도로변

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2014년

❍ 사업내용 : 특색 있는 가로수길 조성(22km)

❍ 사 업 비 : 1,206백만원(국비 435, 도비 167, 군비 604)

(단위 : 본, km, 백만원)

구 분	계	2012	2013	2014
사업량	6,080(34)	680(6)	3,100(15)	1,800(13)
사업비	1,206	166	507	533

□ 추진계획

❍ 수동 화산리 ~ 우명리 구간(국도 3호선)/5km

- 2013. 3월 ~ 2013. 5월 : 벚나무 700본

❍ 안의 석천리 ~ 초동리 구간(군도 20호선)/4km

- 2013. 3월 ~ 2013. 5월 : 감나무(고종시, 대봉) 400본

❍ 함양 본백 ~ 용평 구간(신설, 지방도 1084호선)/4km

- 2013. 3월 ~ 2013. 5월 : 산벚나무, 미카엘라(관목) 등 1,500본

❍ 함양 솔숲 ~ 병곡 휴촌 구간/2km

- 2013. 3월 ~ 5월 : 측백나무 500본

□ 기대효과

❍ 아름다운 가로수 테마거리 조성으로 다양한 볼거리 제공

❍ 쾌적한 가로환경 조성 및 관광 함양 이미지 제고

✍ 산림녹지과 녹지공원담당(☏ 5171)

남덕유산 주차장 조성

❍ 남덕유산 내 주차장이 없어 방문하는 등반객의 도로변 주차로

주민불편 과중

❍ 주차장 조성으로 주민 편의 제공 및 관광함양 이미지 제고

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 서상면 상남리 1083-1번지외 2필지

❍ 면    적 : 8,209㎡(2,483평)

❍ 사업기간 : 2012. 2월 ~ 2014. 4월

❍ 사 업 량

- 주차장(대형 50대, 소형 53대), 화장실, 관리사, 농․특산물 판매장 등

❍ 사 업 비 : 2,010백만원(도비 1,000 군비 1,010)

(단위 : 백만원)

구분	계	2012		2013		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비
계	2,010		510		1,500
도비	1,000	타당성조사, 기본및실시계획, 군계획시설결정	500	주차장, 판매장 등 1식	500
군비	1,010		10		1,000

□ 추진실적

❍ 2012. 2월 ~ 5월 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

❍ 2012. 10월 : 군계획시설변경(주차장) 시행

❍ 2012. 12월 : 실시설계(사전재해 및 환경) 용역 시행

□ 추진계획

❍ 2013. 10월 : 실시설계(사전재해 및 환경) 용역 완료

❍ 2013. 10월 : 군계획시설 변경 결정 및 사업 시행

□ 기대효과

❍ 주차장 설치로 주민 및 관광객 편의제공, 농․특산물 홍보

✍ 산림녹지과 녹지공원담당(☏ 5171)

현장중심의 산불방지대책 추진

❍ 최근 들어 기상변화로 건조기간이 길어짐에 따른 적극적인

산불예방 활동 및 진화 대책 마련

❍ 산불발생 시기별․원인별 특성에 맞는 특화된 예방대책 수립

으로 산불피해 최소화

□ 개    요

❍ 산불방지대책본부 설치 : 산림녹지과, 전 읍․면사무소

❍ 산불조심기간 운영 : 봄철, 가을철

❍ 주요내용 : 건조경보시 특별대책기간운영, 기동타격대 편성,

지상진화대 조직, 산불감시원 사역, 산불위치시스템 적극 활용

□ 추진계획

❍ 산불방지대책 발대식 : 2012. 11. 15(목)

❍ 산불방지대책기간 운영

- 봄  철 : 2013.  1.  1 ~  5. 15.

- 가을철 : 2013. 11. 16 ~ 12. 31.

❍ 추진내용

- 읍면 산불감시원 활동 : 121명

- 시기별 예방대책 : 설 연휴, 정월대보름, 청명․한식, 식목일

산나물채취시기, 봄철 가뭄

- 원인별 예방대책 : 계절별 발생원인, 논․밭두렁 및 농산물폐기물 소각,

입산자 실화 등 원인별 파악 및 대책

- 유관기관 공조체계 유지, 기동단속, 산불감시원활동 강화 등

- 초기 진화 태세 유지 : 함양항공관리소

□ 문제점과 대책

❍ 지역주민 노령화 등으로 산불예방 및 진화인력 증원이 불가피하므로 산불진화대 확대가 필요함

□ 기대효과

❍ 산불예방 활동 강화 및 산불발생시 초동진화로 산림피해 최소화

✍ 산림녹지과 산림보호담당(☏ 5172)

친환경적인 대봉산 생태숲 조성

❍ 지구 온난화·사막화 등에 따른 특성적인 숲 조성으로

자연환경에 대한 보전의식 확산

❍ 산림생물자원의 체계적인 수집·증식과 아름다운 녹색환경조성

으로 숲 보전 및 경영기반 확충

□ 개    요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산 22-1번지 외 9필

❍ 면    적 : 184ha(국유림 8, 도유림 36, 군유림 126, 사유림 14)

❍ 사 업 비 : 8,175백만원(국비 4,013 도비 1,304 군비 2,858)

(단위 : 백만원)

구분	연 도 별	총 사업비	국비(광특)	도 비	군 비	비고
합계		8,150	4,001	1,301	2,848
1차	2005~2009	5,150	2,500	850	1,800
2차	2011~2012	1,675	838	252	585
	2013	1,350	675	202	473

□ 추진실적

❍ 2005 ~ 2009년 : 1차 사업 시행(5,150백만원)

- 건물 2동, 각종 체험원 조성 1식, 기반시설 1식

❍ 2011 ~ 2012년 : 2차 사업 시행(1,675백만원)

- 기본계획 및 실시설계 용역, 환경성검토 용역, 체험장, 광장, 수목식재, 주차장 조성 등

□ 추진계획

❍ 2013. 1월 ~ 12월 : 사업 시행

- 숲 생태 체험원, 주제원, 곤충생태학습장, 관람시설

- 친환경 사방댐 건설 (1개소)

□ 기대효과

❍ 식물유전자원의 네트워크 구축 및 체험학습의 장 제공

❍ 산림문화체험 기회 확대로 산림이용 여가 문화 조성

✍ 산림녹지과 산림보호담당(☏ 5172)

자연 친화적인 숲가꾸기 사업

❍ 육림과 경관조성을 겸한 숲 가꾸기 사업으로 녹색성장 확산

❍ 서민 일자리 창출 및 신·재생에너지원 목질 바이오매스 생산

□ 개    요

❍ 위    치 : 전읍면

❍ 면    적 : 2,300ha, 7명

❍ 사업내용 : 산림경영계획 수립, 정책 숲 가꾸기, 일자리 창출

❍ 사 업 비 : 3,144백만원 (국비 1,754 도비 396 군비 994)

(단위 : ha, 명, 백만원)

구 분	합 계	정책숲가꾸기	일자리창출
사업량	2,307	2,300	7
사업비	3,144	3,044	100

□ 추진계획

❍ 정책 숲가꾸기 사업

- 사 업 내 용 : 솎아베기(개량,보육), 산물정리, 산물수집 등

- 대상지확정 : 2012. 10월 ~ 12월

- 사 업 시 행 : 2013.  2월 ~ 11월

❍ 사회적 일자리 창출

- 사 업 내 용 : 공공 숲가꾸기, 바이오매스

- 참여자 모집 : 2013. 1월

- 사 업 시 행 : 2013. 2월 ~ 10월

❍ 추진방안

- 가시권 우선시행, 자연 경관숲 작업 추진

□ 기대효과

❍ 건강한 숲 조성으로 산림의 경제적 가치 제고 및 숲 경관 조성

✍ 산림녹지과 산림보호담당(☏ 5172)

안전하고 즐거운 등산문화조성

❍ 등산객 증가에 따른 등산로 정비로 생태계 보호 및 안전도모

❍ 산림을 국민의 건강과 휴식을 위한 편익 공간으로 제공

□ 개    요

❍ 대    상 : 관내 주요 숲길 및 등산로

❍ 사업내용 : 숲길 및 등산로 정비, 관리(6.4㎞)

❍ 사 업 비 : 174백만원(국비 38, 도비 11, 군비 125)

(단위 : km, 백만원)

구 분	합계	산림서비스 등산로정비	지리산둘레길 유지․보수	등산로 보수	비고
사업량	6.4	2.4	4	10개소
사업비	174	75	25	74

□ 추진계획

❍ 관내 주요 등산로 정비

- 산주, 등산인 등 의견수렴

- 사업내용 : 등산로 보수, 안내판 정비 등

❍ 지리산 둘레길 및 자락길 유지․보수

- 구  간 : 등구재 ~ 동강 (둘레길, 21km)

의탄 폐교 ~ 의탄교 (자락길, 19.7km)

- 탐방객 증가에 따른 훼손지, 시설물 유지․보수

□ 기대효과

❍ 탐방·등산객에게 편의제공으로 다시 찾고 싶은 이미지 제고

❍ 숲 해설사 취업, 농산물 판매, 숙박제공으로 주민소득 향상 기여

✍ 산림녹지과 산림보호담당(☏ 5172)

자연친화적 임도․사방댐 건설

❍ 다목적 산림경영을 위한 임도시설 확충 및 임도의 활용성 제고

❍ 산사태 발생 우려지역의 사방사업을 통한 산림재해 사전 예방

□ 개    요

❍ 임    도 : 신설 1.0km, 작업임도 1.0km, 구조개량 1.0km, 보수 10km

❍ 사방시설 : 사방댐 7개소, 산지사방 1ha, 계류보전 3.0km

❍ 사 업 비 : 임도사업(485백만원), 사방사업(2,417백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비 (광특)	지 방 비			비 고
			소 계	도 비	군 비
계	2,902	2,031	871	581	290
임도사업	485	340	145	73	72
사방사업	2,417	1,691	726	508	218

□ 추진계획

❍ 수해복구 실시설계 용역 시행

- 사업확정 : 2013. 1월중

- 추진일정 : 2013. 2월말 설계, 5월 착공하여 11월 준공

- 추진내용 : 친환경적인 임도시설, 노선 구조개량 및 임도보수 등

❍ 사방댐 건설

- 대상지 확정 : 2012. 11월말(전년도 타당성 평가 완료지역)

- 추진계획

․함양군 - 대상지 선정 및  동의서 징구

․경남도 - 사방댐 사업 시행(군 의견 반영)

□ 기대효과

❍ 산림기반시설 확대를 통한 산지소득 창출

❍ 산림재해 예방시설을 통한 산사태 등 산림재해 사전예방

✍ 산림녹지과 산림경영담당(☏ 5173)

불로장생 산삼 휴양밸리 조성

❍ 게르마늄이 풍부한 산양삼 생산․판매 기반 구축을 위한 산삼      휴양밸리 조성으로 국내 유일의 이색 휴양단지 조성

❍ 산삼 휴양체험단지 조성으로 세계 산삼엑스포 인프라 구축

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 함양군 병곡면 광평리 산22번지 일원(군유림)

❍ 사 업 비 : 25,000백만원 (국비 1,000, 도비 20,000, 군비 4,000)

❍ 사업기간 : 2012 ～ 2014년

❍ 주요시설 : 불로장생 산삼휴양센터, 심마니 황토 건강촌, 모노레일,

삼색심마니 휴양문화촌

❍ 년차별 투자계획                                       (금액 : 백만원)

구분	계	2012		2013		2014		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	25,000		2,668		1,500		20,832
국비	1,000	실시 설계	334	모노레일,불로 장생숲길		불로장생산삼센터	666
도비	20,000		1,167		1,400		17,433
군비	4,000		1,167		100		2,733

□ 추진계획

❍ 2013. 1월 : 부지(사유지) 매입(129,804㎡)

❍ 2013. 2월 ~ 4월 : 실시설계 시행

❍ 2013. 5월 : 1차 사업 시행

- 모노레일 4km, 불로장생 숲길 13.5km

□ 기대효과

❍ 건강치유, 상설체험 등 연 250천명/75억원 관광소득 창출

❍ 천년의 숲 상림공원과 연계한 체류형 휴양산업 육성

❍ 고용창출 41명(시설운영11, 대체의학 등12, 상설체험장 등 18명)

✍ 산림녹지과 산림경영담당(☏ 5173)

대단위 산림복합경영단지 조성

❍ 목재생산과 더불어 단기임산물의 생산소득을 창출하고, 휴양·     체험기회제공을 통한 대단위 산림복합경영단지 조성

❍ 함양산양삼의 인프라를 활용한 차별화된 건강 체험위주의 산양삼단지 조성으로 산양삼 산업화 추진

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 함양군 병곡면 광평리 산22번지 일원

❍ 사 업 비 : 2,000백만원 (국비 1,000, 도비 500, 군비 500)

❍ 사업기간 : 2012 ～ 2014년

❍ 주요시설 : 숲가꾸기사업, 작업임도개설, 산삼 산약초 재배단지조성

❍ 년차별 투자계획                                           (금액 : 백만원)

구분	계	2012		2013		2014		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	2,000		668		668		664
국비	1,000	숲가꾸기,작업임도	334	산약초 재배단지 조성	334	주말 농장조성	332
도비	500		167		167		166
군비	500		167		167		166

□ 추진계획

❍ 2012. 3월 ~ 12월 : 숲가꾸기사업, 작업임도사업 추진

❍ 2013. 1월 ~ 12월 : 산양삼, 산약초 재배단지 조성

❍ 2014. 1월 ~ 12월 : 주말농장 등 산림복합단지 조성

□ 기대효과

❍ 산양삼을 활용한 경관숲, 유용 특화숲, 생태학습림 등 산림자원을      활용한 테마 관광자원을 통한 소득증대 기여 및 지역경제 활성화      기여

✍ 산림녹지과 산림경영담당(☏ 5173)

산림청 공모사업 추진

❍ 산림소득 사업의 공모를 통해 경쟁력 있고 우수한 생산자

단체를 선정함으로서 산림소득 사업의 내실화 및 규모화 추진

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 계속

❍ 2013 사업현황

사업명	대상자	예산액(천원)					비고
		계	국비	도비	군비	자부담
	계	1,231,250	534,500	106,325	139,925	450,500
임산물산지종합 유통센터	소리마을 영농조합법인	420,000	210,000	25,200	58,800	126,000
산림작물 생산단지 조성	써리산작목반	265,000	106,000	26,500	26,500	106,000
	김윤오	396,250	158,500	39,625	39,625	158,500
	심마니영농조합법인	150,000	60,000	15,000	15,000	60,000

□ 그동안 실적

❍ 기  간 : ‘06 ~ ’12년

❍ 사업비 : 9,999백만원

❍ 사업내용 : 임산물산지종합 유통센터, 산림작물 생산단지 조성, 대단위산림복합경영단지 조성

❍ 대상자 : 함양지리산고로쇠영농조합법인 외 9개 단체

□ 추진계획

❍ 사업내용 : 산림소득작물과 관련된 유통센터, 생산기반조성 등

❍ 추진일정

- 2013. 1월 ~ 2월 : 보조금 교부 신청

- 2013. 3월 ~ 12월 : 사업시행 및 정산

□ 기대효과

❍ 체계적인 생산기반 조성을 통한 소득증대 및 지역경제 활성화

✍ 산림녹지과 산삼담당(☏ 5174)

제10회 함양 산삼축제 개최

❍ 전국의 건강웰빙을 대표하는 축제로 관광함양의 이미지 제고

와 산양삼 판로 개척을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 개    요

❍ 기  간 : 2013. 7월말 ~ 8월초

❍ 장  소 : 상림공원 일원(장소 변경 가능)

❍ 예산액 : 490백만원

❍ 주최/주관 : 함양군/함양산삼축제위원회

□ 그동안 실적

❍ 최초개최 시기 : 2004년

❍ 년도별 개최현황(2004 ~ 2012년)

(단위 : 백만원, 만명)

구 분	예산액	방문인원	경제효과	비 고
함양산삼축제	2,297	318	70,250

□ 추진계획

❍ 행사내용 : 체험, 전시, 공연, 경연, 판매 등

❍ 추진일정

- 2013. 1월 : 보조금 교부결정 및 교부

- 2013. 2월~6월 : 축제 준비

- 2013. 7월 ~ 8월 : 제10회 함양산삼축제 개최

- 2013. 9월 : 결산 및 정산

□ 기대효과

❍ 축제를 통한 관광함양의 이미지 제고 및 지역경제 활성화

❍ 함양 농특산물의 다양한 판로 개척으로 농가소득 증대

✍ 산림녹지과 산삼담당(☏ 5174)

Ⅲ. 특수시책

하림 자생식물원 조성

❍ 지리산 등 함양의 자생 초화류 중심으로 자생식물원 중심축

구축

❍ 함양의 특산․전통 식물의 현지 내 보전․복원으로 어린이,

노약자를 위한 체험․학습 공간 제공

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 66-2번지 일원(하림공원내)

❍ 면    적 : 112,500㎡

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2015년

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(국비 750, 도비 225, 군비 525)

❍ 주요 사업내용

- 특산식물원, 상림 후계림 조성, 지리산․덕유산 자생식물원

조성, 주재별 자생식물원 조성 등

❍ 년차별 투자계획                                     (금액 : 백만원)

구분	계	2013		2014		2015		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,500		500		400		600
국비	750	실시설계 및 기반조성	250	특산식물원,후계림조성	200	자 생 식물원 조성	300
도비	225		75		60		90
군비	525		175		140		210

□ 추진계획

❍ 2013. 1월 ~ 8월 : 실시설계 용역(공원계획변경 등)

❍ 2013. 9월 ~ 12월 : 기반조성

□ 기대효과

❍ 자원의 보전․복원과 지리산권 자생식물원 모델 제시

❍ 하림의 하층식생 보전과 함양의 전통 자생식물 연구 확대

✍ 산림녹지과 녹지공원담당(☏ 5171)

지리산 둘레길 안내센터 건립

❍ 지리산 둘레길 개통 이후 많은 탐방객이 우리군을 방문하고

있어 탐방객에 대한 불편해소와 효율적인 숲길 관리를 위한

안내센터를 건립코자 함

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 마천면 의탄리 870번지(구 의탄초등학교)

❍ 사 업 비 : 700백만원(국비 350, 도비 105, 군비 245)

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2014년

❍ 사업내용 : 안내관, 홍보관, 등산학교, 농․특산물 판매장 등

❍ 연차별 투자계획

구분	계	2013		2014		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비
계	700		200		500
국비	350	실시설계, 내부시설 철거	100	사무실 리모델링 (전시물 설치)	250
도비	105		30		75
군비	245		70		175

□ 추진계획

❍ 2013. 1월～3월 : 선진지 견학 및 운영계획 수립

❍ 2013. 4월～10월 : 실시설계 용역 및 내부시설 철거

❍ 2014. 1월～10월 : 사무실 리모델링(전시물 등) 사업 시행

□ 기대효과

❍ 지리산 둘레길의 중심지에 위치하여 최적의 홍보로 지역 경제 활성화 도모

❍ 백두대간 종점인 지리산과 연계하여 종합 안내센터 역할 및 이용객 편의 제공

✍ 산림녹지과 산림보호담당(☏ 5172)

치유의 숲 조성

❍ 대봉산 생태숲과 자연휴양림을 연계하여  사업 효과 극대화

❍ 도시민의 아토피치료 및 심신 치유를 통한 보건휴양 및 관광

함양 기반 구축

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 함양군 병곡면 광평리 1번지 일원(대봉산자연휴양림내)

❍ 사 업 비 : 3,000백만원 (국비 1,500, 도비 450, 군비 1,050)

❍ 사업기간 : 2013 ～ 2015년

❍ 주요시설 : 건강증진센타 및 숲 치유실, 산림 테라피 등

❍ 년차별 투자계획                                        (금액 : 백만원)

구분	계	2013		2014		2015		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	3,000		300		800		1,900
국비	1,500	실시설계	150	치료실 ,건강증진센타	400	산림테라피 치유숲	950
도비	450		45		120		285
군비	1050		105		280		665

□ 추진계획

❍ 2013. 5월 ~ 7월 : 기본계획 용역

❍ 2013. 6월 : 자문위원회 구성 운영

❍ 2013. 8월 ~ 12월 : 실시설계 용역 및 사전행정절차 이행

□ 기대효과

❍ 대봉산 생태숲과 자연휴양림을 연계 산림치유의 메카로 조성하여 도시민의 인구유입 증대 도모

✍ 산림녹지과 산림경영담당(☏ 5173)

환경성 치유센터 조성

❍ 산업화 도시화로 인한 환경성 치유세터조성을 통한 삶의 질 향상

❍ 그린 일자리 및 부가가치 창출로 지역경제 활성화

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 함양군 병곡면 광평리 17번지 일원

❍ 사 업 비 : 7,000백만원 (국비 3,500, 도비 1,750, 군비 1,750)

❍ 사업기간 : 2013 ～ 2015년

❍ 주요시설 : 아토피 치유센터, 식이치유센터, 숲속유치원 등

❍ 년차별 투자계획                                        (금액 : 백만원)

구분	계	2013		2014		2015		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	3,000		300		2,615		4,085
국비	3,500	실시설계	150	아토피치유센터	1,308	숲속유치원	2,042
도비	1,750		75		654		1,021
군비	1050		75		653		1,022

□ 추진계획

❍ 2013. 3월 ~ 7월 : 기본계획 용역

❍ 2013. 6월 : 자문위원회 구성 운영

❍ 2013. 8월 ~ 12월 : 실시설계 용역 및 사전행정절차 이행

□ 기대효과

❍ 대봉산 생태숲과 자연휴양림 및 치유의 숲을 연계 산림치유의

메카로 조성하여 도시민의 인구유입 증대 도모

✍ 산림녹지과 산림경영담당(☏ 5173)

산림생태·문화체험단지 조성

❍ 산림에서 다양하게 체험할 수 있는 산림생태 문화체험단지

조성으로 산림휴양 및 산촌주민 소득 증대 기여

❍ 가족단위 다양한 산림문화를 체험할 수 있는 공간조성으로

관광함양 기반 마련

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 함양군 서하면 황산리 산47-1번지

❍ 사 업 비 : 27,000백만원 (국비 13,500, 도비 4,050, 군비 9,450)

❍ 사업기간 : 2013 ～ 2017년

❍ 주요시설 : 산림휴양시설, 산림문화체험시설, 산림교육장, 힐링숲 등

❍ 년차별 투자계획                                        (금액 : 백만원)

구분	계	2013		2014		2015이후		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	27,000		1,000		6,500		19,500
국비	13,500	실시 설계	500	산림휴양시설	3,250	산림체험시설 등	9,750
도비	4,050		150		980		2,920
군비	9,450		350		2,270		6,830

□ 추진계획

❍ 2013. 2월 ~ 6월 : 기본계획 용역

❍ 2013. 4월 : 선진지 견학 및 자문위원회 운영

❍ 2013. 6월 ~ 12월 : 실시설계 용역 및 사전행정절차 이행

□ 기대효과

❍ 천혜의 산림자원을 활용한 산림문화, 생태 휴양을 아우르는 대단위 산림 체험단지 조성을 통하여 관광함양 이미지 제고 및 지역경제 활성화 기대

✍ 산림녹지과 산림경영담당(☏ 5173)

목재문화 체험장 조성

❍ 온실가스 감축 및 탄소저장고로서의 목재 역할을 홍보

❍ 다양한 목재에 대한 체험·전시를 통한 목재문화을 창달하여

국산 목재의 우수성 홍보 및 저탄소 녹색성장 기여

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 함양군 안의면 이전리 394번지(군유지)

❍ 사 업 비 : 5,200백만원 (국비 4,160, 도비 312, 군비 728)

❍ 사업기간 : 2013 ～ 2015년

❍ 주요시설 : 목재전시·체험시설, 숲놀이시설, 경관조성, 숲보호시설

❍ 년차별 투자계획                                       (금액 : 백만원)

구분	계	2013		2014		2015		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	5,200		125		3,675		1,400
국비	4,160	실시 설계	100	목재문화체험장	2,940	야외시설전시시설	1,120
도비	313		8		220		85
군비	727		17		515		195

□ 추진계획

❍ 2013. 2월 ~ 7월 : 기본계획 용역

❍ 2013. 5월 : 선진지 견학 및 자문위원회 구성

❍ 2013. 8월 ~ 12월 : 실시설계 용역 및 사전행정절차 이행

□ 기대효과

❍ 숲 놀이, 숲 체험 및 국산목재를 이용한 다양한 목공 체험을

통한 내방객 증가로 인한 지역경제 및 관련 산업 활성화 기여

✍ 산림녹지과 산림경영담당(☏ 5173)

가족숲길 조성사업

❍ 함양읍을 둘러싸고 있는 필봉산 숲길을 복원, 자연이 함께하고

❍ 이야기가 머무는 숲길, 누구나 접할 수 있는 숲길을 조성하여

살고 싶은 함양 분위기 고취

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 필봉산 등산로 일원

❍ 사 업 비 : 600백만원 (국비 600)

❍ 사업기간 : 2013년 1월 ~ 12월

❍ 주요시설 : 숲길조성 10km

□ 추진계획

❍ 2013. 1월 ~ 2월 : 등산로 사전 조사

❍ 2013. 3월 ~ 5월 : 실시설계 용역

❍ 2013. 6월 ~ 12월 : 사업시행

□ 기대효과

❍ 사회적 약자들에게 자연을 접할 수 있는 기회제공

❍ 누구나 친근감 있게 접할 수 있는 숲길을 조성하여 살고 싶은

함양을 조성하여 지역경제 활성화 도모

✍ 산림녹지과 산림경영담당(☏ 5173)

산양삼가공식품 육성사업(향토산업)

❍ 1차적인 생산을 기반으로 늘어나는 산양삼의 물량을 해소

❍ 부가가치가 높은 상품을 개발하여 농가소득 증대 및 지역경제

활성화 도모

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 함양군 관내

❍ 사 업 비 : 3,000백만원 (국비 1,500, 도비 180, 군비 420, 자부담 900)

❍ 사업기간 : 2013 ～ 2015년

❍ 사업대상자 : 인산죽염촌, 함양산양삼협회영농조합법인, 지리산국화주

❍ 년차별 투자계획

(금액 : 백만원)

구분	계	2013	2014	2015	비고
계	3,000	600	1,000	1,400
국비	1,500	300	500	700
도비	180	36	60	84
군비	420	84	140	196
자부담	900	180	300	420

□ 추진계획

❍ 2013. 1월 : 사업계획서 확정

❍ 2013. 2월 : 선진지 견학

❍ 2013. 3월 ~ 12월 : 사업 시행

□ 기대효과

❍ 함양산양삼 다양한 가공제품 생산으로 농가소득 증대

❍ 함양산양삼 생삼위주의 판매→제품 위주 판매로의 전환 계기

✍ 산림녹지과 산삼담당(☏ 5174)