상하수도사업소

<목  차>

Ⅰ. 2013년 업무추진 방향 -------------- 409

Ⅱ. 2013년 주요업무계획 -------------- 411

❏ 마을상수도 유지관리사업 -------------------- 413

❏ 마을상수도 노후관로 교체사업 -------------- 414

❏ 소규모수도시설 개량사업 -------------------- 415

❏ 농촌농업생활용수 개발사업 -------------------- 416

❏ 서상농어촌 지방상수도 개발사업 -------------- 417

❏ 유수율 제고 사업 --------------------------- 418

❏ 함양하수처리장 증설사업 ---------------------- 419

❏ 안의 용추계곡지구 마을하수도 설치사업 -------- 420

❏ 함양군 하수처리수 재이용 관리계획 수립 용역 -- 421

❏ 함양 강우시 하수처리시설 설치사업 ------------ 422

❏ 공공하수처리시설 수질TMS(자동측정기기) 설치 - 423

❏ 공공하수도 재해대비사업 ---------------------- 424

❏ 공공하수처리시설 운영관리 -------------------- 425

Ⅲ. 특수시책 ------------------------ 427

❏ 함양 지방상수도 보조수원지 확보 ------------- 429

Ⅰ. 2013년 업무추진 방향

맑고 맛있는 물 공급으로 삶의 질 향상

	기 본 방 향
❍ 깨끗하고 안정적인 수돗물 생산 공급 ❍ 마을상수도시설의 체계적 유지 관리 ❍ 하수도시설 확충으로 쾌적한 주거환경 조성

	중 점 시 책
❍ 지방상수도 급수구역 확대와 사업의 내실 있는 추진 ❍ 유수율 제고사업 및 물 사랑 운동 추진 ❍ 마을상수도 시설 개량으로 안정적인 용수 확보 ❍ 하수처리구역 확대로 하수도 보급률 향상 ❍ 마을하수도 정비로 주거환경 개선

Ⅱ. 2013년 주요업무계획

마을상수도 유지관리사업

❍ 농촌지역의 인구 노령화에 따른 전문업체 위탁관리와 천재지변 및 시설

노후로 인한 긴급한 보수 등 정기 및 수시 수질검사 확행으로 안정된 응용수 공급

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 마을상수도 277개소

❍ 사 업 비 : 758백만원 (도비 : 24,  군비 : 734)

□ 추진계획

❍ 사업내용                                  (단위 : 백만원)

구 분	위 치	사업량 (개소)	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계			758	-	24	734
위탁관리	전 읍□면	277	303	-	24	279
긴급보수	전 읍□면	277	300	-	-	300
수질검사	전 읍□면	277	155		-	155

❍ 추진일정

- 2013년 년중 : 긴급보수사업 추진

- 2012. 12월 ~ 2013. 3월 : 한파 우심지구 시설개선

- 2013. 1월 : 위탁관리 용역원가 산정

- 2013. 1월 ~12월 : 수질검사 정기 및 수시 시행으로 안정된 음용수 공급

- 2013. 1월 ~ 2013. 12월 : 위탁관리 시행

□ 기대효과

❍ 시설개선과 체계적 유지관리로 급수에 대한 주민불편 최소화

✍ 상하수도사업소 관리담당(☏ 5231)

마을상수도 노후관로 교체사업

❍ 노후 및 누수로 인해 불편을 겪고 있는 마을상수도 관로를

교체하여 생활용수의 안정적 공급과 군민 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 6월

❍ 사 업 량 : 마을상수도 2개소

❍ 사 업 비 : 200백만원

□ 추진계획

❍ 사업내용                                  (단위 : 백만원)

구 분	위 치	사업량 (개소)	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계		2개소	200	-	-	200
내동	안의면 하원리	L=1.0km	100	-	-	100
상개평	지곡면 평촌리	L=1.1km	100	-	-	100

❍ 추진일정

- 2012. 12월 : 대상지 조사 및 확정

- 2013. 1월 ~ 2월 : 실시설계 및 주민설명회

- 2013. 3월 ~ 6월 : 사업 시행

□ 기대효과

❍ 노후관로 교체로 누수율 저감과 안정되고 깨끗한 음용수 공급

✍ 상하수도사업소 관리담당(☏ 5231)

소규모수도시설 개량사업

❍ 노후, 원수부족, 수질불량 시설에 대한 개량 정비로 생활용수의

안정적 공급과 군민 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 11월

❍ 사 업 량 : 소규모 수도 시설개량  6개소

❍ 사 업 비 : 1,332백만원(국비:932, 군비:400)

□ 추진계획

❍ 사업내용                                  (단위 : 백만원)

구분	위 치	사업량 (개소)	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계		6개소	1,332	932	-	400
음정	마천면 삼정리	L=1.6km	192	134	-	58
신당	안의면 황곡리	L=2.0km	240	168	-	72
황대	안의면 월림리	L=1.5km	180	126	-	54
우전	서하면 봉전리	L=1.8km	216	151	-	65
옥산	서상면 옥산리	L=2.7km	324	227	-	97
소현	병곡면 옥계리	L=1.5km	180	126	-	54

❍ 추진일정

-  2012. 11월 : 대상지 확정

-  2013. 1월 ~ 2월 : 실시설계 및 주민설명회

-  2013. 2월 : 부지보상협의

-  2013. 3월 ~ 11월 : 사업시행

□ 기대효과

❍ 소규모 수도시설의 개량으로 풍부하고 깨끗한 음용수 공급 및

주민 불편 해소

✍ 상하수도사업소 관리담당(☏ 5231)

농촌농업생활용수 개발사업

❍ 상수도 공급이 어려운 농촌 자연마을에 암반관정 개발로 생활

용수의 안정적 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 전 읍․면

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 11월

❍ 사 업 량 : 암반관정 개발 1개소

❍ 사 업 비 : 629백만원(국비:440, 군비:189)

□ 추진상황

❍ 2012. 12월 : 사업대상지 선정

❍ 2013. 1~6월 : 지하수 기초․영향 조사 및 관련 인․허가 협의

❍ 2013. 5~7월 : 이용시설 및 관로공사 실시설계

❍ 2013. 6~11월 : 사업 시행

※ 2013년 사업 추진 현황                          (단위 : 백만원)

위 치		사업량	사업비	공사 기간	진도(%)
읍,면	마을
계		1개소	629
유림면	서주	관정개발 1개소 관로매설L=2.5km	629	2013. 1 ~ 11월

□ 문제점 및 대책

❍ 암반관정 수원 부족 및 수질불량으로 조기 관정개발 애로

→연계되는 확공 및 관로설치공사 지연

□ 기대 효과

❍ 농촌지역의 생활용수 안정적 공급 및 수질개선

✍ 상하수도사업소 관리담당(☏ 5231)

서상농어촌 지방상수도 개발사업

❍ 서상농어촌 지방상수도 개발에 따른 안정적인 원수 확보

❍ 서상․서하․안의지구에 원활한 상수도를 공급․확대하여

주민생활 불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 서상·서하·안의면 일원(3개면, 52마을, 7,800명)

❍ 사업기간 : 2006. 12월 ~ 2014. 12월

❍ 사업계획                                           (단위 : 억원)

구분	사 업 비			규모	사 업 량			비고
	계	광특	지방		수원시설	정수시설	관로시설
총괄	414	252	162	Q = 3,700㎥/일	대남저수지 V = 643,000㎥	3,700㎥/일	74㎞
서상	126	50	76	Q = 600㎥/일	대남저수지	-	-	완료
서하 안의	288	202	86	Q = 3,100㎥/일	대남저수지 및 기존 노상저수지	2계열 3,700㎥/일	74㎞	진행

□ 그동안 실적

❍ 2007. 8월 : 서상지방상수도 사업 인가

❍ 2010. 4월 : 서상지방상수도 사업 변경 인가

❍ 2011. 8월 : 수원시설 및 정수장 건축물 5동 건립 완료

❍ 총괄진도 : 70%

□ 추진계획

❍ 사업규모 : 전기·계장 1식,관로시설 5km(배수2.5km, 송수2.5km)

❍ 사업비                                           (단위 : 억원)

계	기투자	2013년	2014년	비 고
414	246	64	104

□ 기대효과

❍ 서상, 서하, 안의면 주민들에게 안정적인 수돗물 공급

✍ 상하수도사업소 상수도담당(☏ 5232)

유수율 제고 사업

❍ 상수도 관로의 노후 및 파손 등 누수로 인한 생활불편 해소

❍ 수돗물의 안정적인 급수를 통한 지방상수도 운영의 효율화

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 지방상수도 급수구역 전체

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)

❍ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계		기투자		2013년도		2014이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		3,603		2,106		597		900
노후관로 개량	19.8㎞	3,313	11.9	1,986	3.0	527	4.9	800
누수탐사 용역	1식	290	1식	120	1식	70	1식	100

□ 추진계획

❍ 2012. 12월 : 사업대상지 사전 조사

❍ 2013. 3월 도로굴착 심의

❍ 2013. 4월 ~ 10월 : 사업시행

❍ 년중(수시) : 누수탐사 용역

□ 기대효과

❍ 파손 및 노후관로 개량으로 누수율 저감

❍ 누수탐사에 따른 누수관 신속 복구로 유수율 향상

❍ 누수량 저감 및 유수율 향상으로 수돗물 안정공급

✍ 상하수도사업소 상수도담당(☏ 5232)

함양하수처리장 증설사업

□ 4대 강 중점관리 구역 내 하수처리시설에 대한 방류수 수질기준 강화

□ 생활수준 향상에 따른 하수발생량 증가대비

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 함양읍 용평리

❍ 사업기간 : 2012. 1 ~ 2015. 12월(계속사업)

❍ 사 업 량 : 처리시설 증설 4,000㎥/일(7,000⇒11,000㎥/일)

❍ 총사업비 : 11,423백만원(국비:5,711, 지방비:5,712)

□ 그동안 실적

❍ 기본 및 실시설계 착수(설계중) : 2012. 4 ~ 2013. 4월

□ 추진계획                                                 (단위 : 백만원)

구 분	총 사업비		기 투자		2013계획		2014이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리시설 (증설) 4,000㎥	11,423	기본 및 실시 설계 1식	291	처리시설 (증설) 18%	2,098	처리시설 (증설) 82%	9,034
국 비		5,711		141		1,049		4,521
도 비		1,142		12		210		920
군 비		4,570		138		839		3,593

❍ 2013. 1 ~ 4월 : 사업인가, 재원협의, 설계기술검토협의, 계약심사

❍ 2013. 2 ~ 5월 : 증설부지 감정 및 보상실시

❍ 2013. 6 ~ 2015. 12월 : 사업 시행, 시운전, 완료

□ 기대효과

❍ 하수용량 증가에 따른 시설 증설로 안정적 처리 및 수질개선

✍ 상하수도사업소 하수도담당(☏ 5233)

안의 용추계곡지구 마을하수도 설치사업

□ 상수원 상류지역 마을하수도 설치로 하천수질 보전

□ 계곡 유원지 주변 깨끗한 환경조성으로 관광기반 구축

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 안의면 상원, 하원리 일원

❍ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2014. 12월(계속사업)

❍ 사 업 량 : 6개마을, 하수관거 21.5km

❍ 총사업비 : 4,741백만원(국비:1,880, 지방비:2,861)

□ 그동안 실적

❍ 사업인가 : 2009. 10월

❍ 용추하수처리장(Q=460톤/일) 및 주관로(L=6.8km)완료 : ‘09~’12년

□ 추진계획                                                 (단위 : 백만원)

구 분	총 사업비		기 투자		2013계획		2014이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 460톤 관 거 21.5km	4,741	처리장 460톤 관 거 6.8km	2,481	관 거 9km	1,107	관 거 5.7km	819
국 비		1,880		300		790		571
도 비		161		12		63		63
군 비		2,700		2,169		254		185

❍ 2012. 12 ~ 2014. 12월 : 사업시행, 시운전, 완료

□ 기대효과

❍ 쾌적한 정주여건 조성 및 안의지방상수원 상류 수질개선

✍ 상하수도사업소 하수도담당(☏ 5233)

함양군 하수처리수 재이용 관리계획 수립 용역

(법규이행사무)

❍ 물을 효율적으로 활용하고 공공수질에 미치는 해로운 영향저감

❍ 물 자원의 지속 가능한 이용을 도모

□ 개    요

❍ 사 업 량 : 물 재이용 관리계획 수립 1식

❍ 계획구역 : 함양군 일원

❍ 사업기간 : 2012. 11 ~ 2013. 6월(계속사업)

❍ 총사업비 : 850백만원

❍ 관련법령 : 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제6조

(물 재이용 관리계획의 수립)⇒2011.06.08일 법 시행

※ 해당법에 따라 2013.06월까지 환경부장관의 승인을 받아야 함.

□ 추진계획                                  (단위 : 백만원)

구 분	총 사업비		기 투자		2013년 계획		2014이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업비	사업비
군 비	계획수립 1식	850	계획수립 47%	400	계획수립 53%	450	-	-

❍ 2012. 11월 : 용역 집행계획 수립

❍ 2012. 11월 ~ 12월 : 용역 업체 선정

❍ 2012. 12월 ~ 2013. 6월 : 재이용 관리계획 수립, 환경부승인, 완료

□ 기대효과

❍ 물의 효율적 이용을 위한 관리계획 마련

❍ 물 이용시설 확충을 위한 재원조달 기틀 마련

✍ 상하수도사업소 하수도담당(☏ 5233)

함양 강우시 하수처리시설 설치사업

❍ 강우시 공공수역으로 유입되는 영양염류를 저감 조류발생 억제

❍ 공공수역의 수질보전과 안전한 친수공간 확보

□ 개    요

❍ 대상시설 : 함양하수처리장

❍ 위    치 : 함양군 함양읍 용평리 일원

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2014. 12월(계속사업)

❍ 사 업 량 : 간이공공하수처리시설 4,000㎥/일

(관로, 침사지, 사여과기, 소독시설, 유입수문제어시설)

❍ 총사업비 : 3,046백만원(국비:1,523, 지방비:1,523)

□ 그동안 실적

❍ 2012. 6월 : 2013년 시범사업대상 지자체 선정(환경부)

※ 전국대상시설 471개소 중 2013년도 시범사업 13개소 시행

□ 추진계획                                                    (단위 : 백만원)

구 분	총 사업비		기 투자		2013계획		2014이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	간이하수처리시설 4,000㎥	3,046	-	-	실시설계 ․ 간이하수처리시설 33%	1,000	간이하수처리시설 67%	2,046
국 비		1,523		-		500		1,023
도 비		305		-		100		205
군 비		1,218		-		400		818

❍ 2013. 1 ~ 6월 : 기본 및 실시설계

❍ 2013. 6 ~ 8월 : 사업인가, 재원협의, 설계기술검토협의, 계약심사

❍ 2013. 10 ~ 2014. 12월 : 사업 시행, 시운전 완료

□ 기대효과

❍ 강우시 처리장의 시설용량 보다 초과 유입된 하수를 간이 처리하여 방류함으로서 공공수역의 수질오염 저감

✍ 상하수도사업소 하수도담당(☏ 5233)

공공하수처리시설 수질TMS(자동측정기기) 설치

(법규이행사무)

❍ 하수 방류수질의 실시간 관리․점검으로 수질오염사고 예방

❍ 계절별, 시간대별 수질현황 분석관리로 자체 공정개선 유도

□ 개    요

❍ 대상시설 : 안의하수처리장(900㎥/일), 수동하수처리장(800㎥/일)

❍ 위    치 : 안의면 이전리 및 수동면 화산리 일원

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 12월

❍ 사 업 량  : 수질TMS설치

-각 처리장별 : 건축1동(50㎡), 전력1식, 전산1식, 측정기기(COD,SS,TN,TP,PH)

❍ 총사업비 : 503백만원

❍ 관련법령 :「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제38조의 2

(측정기기의 부착등) ⇒ 2014. 1. 16일까지 설치․가동하여야 함.

□ 추진계획

❍ 2013. 1 ~ 4월 : 설계(기종선정 포함)

❍ 2013. 4월 : 건축협의

❍ 2013. 5 ~ 12월 : 사업시행

❍ 2013. 10 ~ 12월 : 시운전 완료

❍ 2014. 1월 : 가동

□ 기대효과

❍ 수질오염사고 예방 및 체계적인 수질현황 분석관리로 공정개선

✍ 상하수도사업소 하수도담당(☏ 5233)

공공하수도 재해대비사업

❍ 공공하수도시설의 원활한 운영을 위한 긴급재해․유지복구사업

❍ 노후관로개량 및 맨홀펌프장, 관로준설을 통한 민원해소

□ 개    요

❍ 대상시설 : 공공하수처리구역 50개소(하수관로, 맨홀, 중계펌프장)

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2022. 12월(계속사업)

❍ 사업내용 : 하수도시설유지․긴급복구, CCTV조사․시험, 관로준설

❍ 총사업비 : 27,374백만원

□ 추진계획

❍ 사업내용                                                 (단위 : 백만원)

구 분	총 사업비		기 투자		2013계획		2014이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업비	사업비
군 비	유지관리 1식	27,374	유지관리 1식	2,156	4건	218	유지관리 1식	25,000

❍ 2013년 사업량                                           (단위 : 백만원)

세 부 사 업 명	사 업 량	사업비	비고
계	4건	218
재해저감 위기관리대응 시설유지정비	유지관리1식	100
하수관로 CCTV조사 및 시험	관로내부조사1식	18
하수관로 준설	준설․세정 1식	50
유림 우동지구 마을하수도 실시설계용역	우동․화촌 146가구,377명	50

❍ 추진일정

-2013. 1 ~ 12월 : 관로․펌프장․맨홀 CCTV조사 및 준설(연중실시)

□ 기대효과

❍ 주기적인 시설정비․관리로 원활한 하수소통 및 악취저감

❍ 재해예방 및 긴급복구

✍ 상하수도사업소 하수도담당(☏ 5233)

공공하수처리시설 운영관리

(수질개선 특별회계)

❍ 생활하수의 적정처리를 위한 공공하수처리시설의 운영관리

❍ 공공수역의 수질보전으로 청정함양 이미지유지 및 삶의 질 향상도모

□ 개    요

❍ 대상시설 : 공공하수처리시설 50개소

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2022. 12월(계속사업)

❍ 사업내용 : 운영관리 1식

❍ 총사업비 : 36,696백만원

□ 추진계획

❍ 사업내용

- 총 괄                                                      (금액: 백만원)

구분	총사업비		기투자		2013계획		2014이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
군비	운영 관리 1식	36,696	운영 관리 1식	9,736	운영 관리 1식	1,220	운영 관리 1식	25,740

- 2013년 사업량                                            (금액: 백만원)

세 부 사 업 명	위 치	사업량	사업비	비고
계			1,220
공공하수처리운영관리	함양처리장외 49개시설	유지관리 1식	1,133
통합시스템 운영관리	함양처리장외 23개시설	유지관리 1식	87

❍ 추진일정

- 2013. 1 ~ 6월 : 공공하수도시설 운영․관리(상반기)

□ 기대효과

❍ 안정적 공공하수처리시설 운영관리 및 공공수역 수질보전

□ 문제점

❍ 공공하수 처리시설 운영관리비 예산 2,474백만원 중 1,220백만원      은 상반기 예산으로 제1회 추경시 1,256백만원 예산확보 요망.

✍ 상하수도사업소 하수도담당(☏ 5233)

Ⅲ. 특수시책

함양 지방상수도 보조수원지 확보

❍ 갈수기 원수부족 및 봄철 영농작업에 따른 흙탕물․질산 등        오염물질 유입으로 정수에 애로가 있어,

❍ 보조수원지 개발을 통한 원수의 안정적 확보로 원활한 가정급수

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 월암리 594-1(금당골 소류지5,600㎥)

❍ 사 업 량 : 저수지 확장보강 1식, 관로신설 L=3.25km

❍ 사 업 비 : 1,200백만원

❍ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2014. 10월

□ 추진계획

❍ 사업내용

구 분	총괄		2013계획		2014이후		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		1,200		300		900
관로신설	L=3.25km	800	-	-	관로신설	800
저수지확장	1식	400	보상 및 확장	300	확장	100	몽리면적 8ha

- 옥계저수지의 원수를 금당골 소류지로 유입(기존 도수로 활용)

- 금당골 소류지에서 함양취수장까지 관로연결(3.25km)

❍ 추진일정

- 2012. 12월 : 소류지 관리이관 협의(건설과 농업기반담당)

- 2013. 1월 : 원수사용 협의(한국농어촌공사 거창․함양지사)

- 2013. 3월 : 실시설계 용역

- 2013. 3월 : 인․허가 및 행정절차 이행

- 2013. 4월 ~ 10월 : 사업시행

□ 기대효과

❍ 원수의 안정적인 확보로 지방상수도 수질개선 향상

❍ 깨끗하고 안정적인 “물” 공급을 통한 군민 삶의 질 향상

✍ 상하수도사업소 상수도담당(☏ 5232)