산 림 녹 지 과

Ⅰ. 2014 업무추진 방향

Ⅱ. 2014 주요업무 계획

□ 하림 자생식물원 조성

□ 남덕유산 주차장 조성

□ 푸르름이 가득한 녹색공간 조성

□ 테마가 있는 가로수길 조성

□ 현장중심의 산불방지대책 추진

□ 자연 친화적인 숲가꾸기 사업

□ 안전하고 즐거운 등산문화 조성

□ 지리산 둘레길 안내센터 설치

□ 산지자원화를 위한 임도·사방댐 건설

□ 목재문화 체험장 조성

□ 목재집하장 시설 보완사업

□ 목재집하장 톱밥 생산비 지원

□ 친환경적인 대봉산 생태숲 관리운영

□ 불로장생 산삼 휴양밸리 조성

□ 대단위 산림복합경영단지 조성

□ 치유의 숲 조성

□ 환경성질환 예방관리센터 조성

□ 산림생태·문화체험단지 조성

□ 산림청 공모사업 추진

□ 함양 산삼축제 개최

Ⅲ. 특수시책

□ 산악레포츠 테마임도 조성

□ 산양삼 시범지구지정 항공살포 추진

□ 산양삼가공상품화 및 체험관광육성사업

Ⅰ		2014 업무추진 방향

“산에 돈이 있다”

	목 표
삶의 질 향상을 위한 산림휴양 문화기반 확충 저탄소 녹색성장의 기반구축으로 산림의 공익적 기능 증진 확실한 산지소득 기반 확보
	중점과제
산림을 이용한 관광함양 기반 조성 완벽한 산불방지로 산림자산 보전 친환경적인 산림휴양시설 확충 지속적인 산림보호와 육성으로 저탄소 녹색성장 기반 조성 산양삼 세계화를 위한 산삼엑스포 기반 구축

	Ⅱ. 2014 주요업무 계획

2014 군정 주요업무

산림녹지과 녹지공원담당 ☏ 5171

하림 자생식물원 조성

❍ 지리산 등 함양의 자생 초화류 중심으로 자생식물원 조성

❍ 상림숲과 차별화된 하림의 특화공간을 마련하여 다양한 계층의 체험과 불거리 제공

□ 개    요(공모사업)

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 66-2번지 일원(하림공원내)

❍ 면    적 : 11.2ha

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2015년

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(국비 750, 도비 225, 군비 525)

❍ 주요 사업내용

- 지리산․덕유산 자생식물원, 덩굴식물원, 수생식물원, 관목원, 철쭉동산 등

❍ 년차별 투자계획                                            (금액 : 백만원)

구분	계	2013		2014		2015		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,500		500		500		500
국비	750	실시설계 및 기반조성	250	산책로 포장 외 2종	250	시설물 관목류 식재	250
도비	225		75		75		75
군비	525		175		175		175

□ 추진실적

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 완료 : 2013. 10월

❍ 1차사업 시행 : 2013. 11월 ~ 2014. 6월(420백만원, 우수공 외 2종)

□ 추진계획

❍ 자생식물원 조성사업(2차) 시행 : 2014. 2월 ~ 10월

- 사업비 : 500백만원  - 사업내용 : 산책로 포장 및 교목류 식재

2014 군정 주요업무

산림녹지과 녹지공원담당 ☏ 5171

남덕유산 주차장 조성

❍ 등산객의 도로변 무단 주차에 따른 주민불편 해소

❍ 방문객에 대한 편의 제공 및 관광함양 이미지 제고

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 서상면 상남리 1083-1번지 외 2필지

❍ 면    적 : 9,099㎡

❍ 사업기간 : 2012. 2월 ~ 2014. 10월

❍ 사 업 량

- 주차장(대형 37대, 소형 47대), 화장실, 관리사, 농․특산물 판매장 등

❍ 사 업 비 : 1,760백만원(도비 1,000, 군비 760)

(단위 : 백만원)

구분	계	2012		2013		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,760		510		1,250
도비	1,000	타당성조사, 기본및실시 계획, 군 계획시설 결정	500	주차장 조성	500
군비	760		10		750

□ 추진실적

❍ 남덕유산 주차장 조성 실시설계 완료 및 보상금 지급 : 2013. 6월

❍ 남덕유산 주차장 조성사업 시행 : 2013. 6월 ~ 2014. 10월

※ 군관리계획 결정 지연으로 공사 중지(2013. 7. 8)

□ 추진계획

❍ 공사중지 해제 및 사업 시행 : 2014. 2월 ~ 2014. 10월

❍ 군 계획시설(주차장) 변경 결정 : 2014. 2월

2014 군정 주요업무

산림녹지과 녹지공원담당 ☏ 5171

푸르름이 가득한 녹색공간 조성

❍ 지역별 아름다운 꽃길 조성으로 다양한 볼거리 제공

❍ 지속적인  녹색숲 조성 추진으로 다시 찾는 관광함양 기반 조성

□ 개    요

❍ 사 업 비 : 1,015백만원(도비 190, 군비 825)

❍ 사업내용

- 입면녹화(1개소 20백만원), 소공원(2개소 200백만원) 조성

- 사회복지시설 내 녹색복지숲(공모) 조성(1개소 120백만원)

- 읍면 꽃길․꽃동산 조성 및 사후관리(115km 183백만원)

- 생활주변 녹화 및 사후관리(전읍면, 95백만원)

- 시가지 플라워박스 초화 식재(1km 150백만원)

- 하림공원, 가로수, 산림경영모델 숲 등 사후관리(247백만원)

❍ 사업기간 : 2014. 2월 ~ 2014. 12월

□ 추진계획

❍ 주요 도로변 꽃길․꽃동산 조성 : 연중 읍․면 시행

❍ 복지숲 조성(위치/사업비) : 안의면 초동리 / 120백만원

❍ 시가지 다리난간 및 플라워박스 : 2014. 3월 ~ 10월(4회)

❍ 가로수, 하림공원, 소공원 및 산림경영모델 숲 사후관리 : 연중

- 제초, 덩굴류제거, 비료주기 등으로 수목 및 초화류 지속관리

□ 문제점 및 대책

❍ 관내 가로수, 공원 등의 사후관리 예산 부족으로 적기 관리 애로

⇒ 사후관리 인력 증액 건의(3명, 42백만원)

2014 군정 주요업무

산림녹지과 녹지공원담당 ☏ 5171

테마가 있는 가로수길 조성

❍ 관내 도로별 특색있는 수목 식재로 명품 가로수길 조성

❍ 볼거리가 있고 누구나 찾고 싶은 가로경관을 구축

□ 개    요

❍ 대    상 : 관내 주요 도로변

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2014년

❍ 사업내용 : 특색있는 가로수길 조성(왕복 54km)

❍ 사 업 비 : 820백만원(국비 311, 도비 293, 군비 216)

(단위 : km, 백만원)

구 분	계	2012	2013	2014
사업량	54	12	32	10
사업비	820	164	408	248

□ 추진실적

❍ 국도3호선(수동본통~원평, 안의금천~군경계지) 1차 식재 : 꽃피는 가로수

❍ 지방도1084호선(함양 본백~용평) 식재 : 녹음이 있는 가로수

□ 추진계획

❍ 국도3호선(수동남계~안의이전, 왕복 10km) 기존수목 제거 및 신규 가로수 식재

□ 기대효과

❍ 명품 가로수길 조성으로 쾌적하고 특색있는 가로 환경 제공

현장중심의 산불방지대책 추진

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림보호담당 ☏ 5172

❍ 기상변화로 건조기간이 길어짐에 따른 적극적인 산불예방 활동 및 진화 대책 마련

❍ 산불발생 시기별․원인별 특성에 맞는 특화된 예방대책 수립으로 산불피해 최소화

□ 개    요

❍ 산불방지대책본부 설치 : 산림녹지과, 전 읍․면사무소

❍ 산불조심기간 운영 : 2013. 11월 ~ 2014. 5월

❍ 주요내용 : 건조경보시 특별대책기간운영, 기동타격대 편성, 지상진화대 조직, 산불감시원 사역, 산불위치시스템 적극 활용

□ 추진계획

❍ 산불방지대책 발대식 : 2013. 11. 18

❍ 산불방지대책 상황실 운영 : 2013. 11월 ~ 2014. 5월

❍ 추진내용

- 산불진화대 편성 34명

- 읍면 산불감시원 활동 : 121명

- 시기별 예방대책 : 설 연휴, 정월대보름, 청명․한식, 식목일, 산나물채취시기, 봄철 가뭄

- 원인별 예방대책 : 계절별 발생원인, 논․밭두렁 및 농산물폐기물 소각, 입산자 실화 등 원인별 파악 및 대책

- 유관기관 공조체계 유지, 기동단속, 산불감시원활동 강화 등

- 초기 진화 태세 유지 : 함양항공관리소 협조

□ 기대효과

❍ 산불예방 활동 강화 및 산불발생시 초동진화로 산림피해 최소화

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림보호담당 ☏ 5172

자연 친화적인 숲가꾸기 사업

❍ 육림과 경관조성을 겸한 숲 가꾸기 사업으로 녹색성장 선도

❍ 서민 일자리 창출 및 품질 높은 목재 생산

□ 개    요

❍ 위    치 : 전읍면

❍ 면    적 : 2,050ha

❍ 사업내용 : 정책 숲 가꾸기

❍ 사 업 비 : 3,226백만원(국비 1,613, 도비 481, 군비 1,132)

(단위 : ha, 명, 백만원)

구 분	합 계	정책숲가꾸기	조림지 풀베기
사업량	2,050	1,650	400
사업비	3,226	2,866	360

□ 추진계획

❍ 정책 숲가꾸기 사업

- 사업내용 : 솎아베기(개량,보육), 산물정리, 산물수집 등

- 대상지확정 : 2013. 11월 ~ 2014. 1월

- 사업시행 : 2014. 2월 ~ 11월

❍ 조림지 사후관리

- 사업내용 : 조림지 풀베기사업

- 사업시행 : 2014. 6월 ~ 9월

❍ 추진방안

- 가시권 우선시행, 산주신청, 자연경관숲 작업 추진

□ 기대효과

❍ 건강한 숲 조성으로 산림의 경제적 가치 제고 및 숲 경관 조성

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림보호담당 ☏ 5172

안전하고 즐거운 등산문화 조성

❍ 등산객 증가에 따른 등산로 정비로 생태계 보호 및 안전도모

❍ 산림을 국민의 건강과 휴식을 위한 편익 공간으로 제공

□ 개    요

❍ 대    상 : 관내 주요 숲길 및 등산로

❍ 사업내용 : 숲길 및 등산로 정비, 관리(22.1㎞, 5개소)

❍ 사 업 비 : 108백만원(국비 34, 도비 10, 군비 64)

(단위 : km, 백만원)

구 분	합계	산림서비스(백암산) 등산로정비	지리산둘레길 유지·보수	관내 등산로 유지·보수	비 고
사업량	22.1/5개소	2.1	20	5개소
사업비	108	68	20	20

□ 추진계획

❍ 산림서비스(백암산)

- 산주, 등산인 등 의견수렴

- 사업내용 : 등산로 보수, 안내판 정비 등

❍ 지리산둘레길 유지․보수

- 구  간 : 등구재 ~ 동강

- 탐방객 증가에 따른 훼손지, 시설물 유지․보수

❍ 관내 등산로 유지․보수

- 백운산 외 4개소

- 탐방객 증가에 따른 훼손지, 시설물 유지․보수

□ 기대효과

❍ 탐방·등산객에게 편의제공으로 방문객 증가 효과 기대

❍ 농산물 판매, 숙박제공으로 주민소득 향상 기여

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림보호담당 ☏ 5172

지리산 둘레길 안내센터 설치

지리산 둘레길 개통 이후 많은 탐방객이 우리군을 방문하고 있어 탐방객에 대한 불편해소와 효율적인 숲길 관리를 위한 안내센터 설치

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 마천면 의탄리 870번지(구 의탄초등학교)

❍ 사 업 비 : 750백만원(국비 350, 도비 105, 군비 295)

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2014년

❍ 사업내용 : 안내관, 홍보관, 등산학교, 농․특산물 판매장, 쉼터조성 등

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2013		2014		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비
계	750		200		550
국비	350	실시설계, 내부시설 철거	100	사무실 리모델링 (전시물 설치)	250
도비	105		30		75
군비	295		70		225

□ 추진실적

❍ 주차장 정비 및 주변정리 : 2013. 3월

❍ 지리산둘레길안내센터 실시설계 용역 : 2013. 6월

❍ 지리산둘레길안내센터 리모델링사업 시행 : 2013. 11월~공사중

□ 추진계획

❍ 안내센터 리모델링사업 시행 (계속) : 2014. 1월 ~ 12월

❍ 안내센터 내 쉼터 조성사업 : 2014. 3월 ~ 2014. 10월

□ 기대효과

❍ 백두대간 종점인 지리산과 연계하여 종합 안내센터 역할 및 이용객 편의 제공

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림경영담당 ☏ 5173

산지자원화를 위한 임도 ․ 사방댐 건설

❍ 다목적 산림경영과 산지자원화를 위한 임도시설 확충 및 임도의      활용성 제고

❍ 사방사업 실시를 통한 산림재해 예방

□ 개    요

❍ 임    도 : 신설 2km, 보수 13km, 구조개량 2km, 작업임도 1km

❍ 사방시설 : 사방댐 7개소, 산지사방 1ha, 계류보전 3.0km, 사방댐관리 6개소

❍ 사 업 비

- 임도사업 : 760백만원(국비 532, 도비 123, 군비 105)

- 사방사업 : 2,546백만원(국비 1,782, 도비 535, 군비 229)

□ 추진계획

❍ 임도사업

- 사업대상지 확정 : 2014. 1월

- 실시설계 용역 시행 : 2014. 2월

- 사업 착공 : 2014. 5월

❍ 사방댐 건설

- 대상지 확정(사방사업 타당성평가 완료지역) : 2013. 11월

- 대상지 선정 및 동의서 징구(함양군) : 2014. 6월

- 사방사업 시행 (경상남도 → 군 의견 반영)

□ 기대효과

❍ 산림경영 다양화를 위한 임도개설을 통하여 산림기반확충 및 산림  레포츠 기능 강화

❍ 산사태 취약지역 사방사업 실시를 통한 산림재해로부터 재산 및  인명 보호

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림경영담당 ☏ 5173

목재문화 체험장 조성

❍ 온실가스 감축 및 탄소저장고로서의 산림과 목재의 중요성 홍보

❍ 체험 ․ 전시를 통한 국산 목재의 우수성 홍보 및 저탄소 녹색 성장 기여

□ 개    요(공모사업)

❍ 위    치 : 안의면 이전리 394번지(군유지) 외 1필지

❍ 규    모 : 4ha(군유림)

❍ 사 업 비 : 5,200백만원(국비 4,160, 도비 313, 군비 727)

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2015년

❍ 사업내용 : 목재전시․체험시설, 숲놀이시설, 경관조성, 숲보호시설

❍ 년차별 투자계획                                    (금액:백만원)

구분	계	2013		2014		2015		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	5,200		125		1,000		4,075
국비	4,160	기본 및 실시설계	100	목재문화체험장	500	야외시설,전시시설	3,560
도비	313		8		125		180
군비	727		17		375		335

□ 추진실적

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 시행 : 2013. 8월

❍ 행정절차이행 : 2013. 12월

□ 추진계획

❍ 과수원(사과) 보상협의 : 2014. 2월

❍ 마을 공청회 개최 : 2014. 2월

❍ 사업 시행(사업기간 2년) : 2014. 3월

□ 기대효과

❍ 숲 놀이, 숲 체험 국산목재를 이용한 다양한 목공 체험을 통한   관광객 증가로 지역경제 활성화 기여

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림경영담당 ☏ 5173

목재집하장 시설 보완사업

❍ 기후변화 대응 및 탄소저장소로 산림내 버려지는 목재이용 증진      으로 고부가가치 창출

❍ 노후화된 목재집하장 시설 교체로 톱밥 생산 증가 및 가격 인하      로 경쟁력 도모

□ 개    요

❍ 위    치 : 수동면 화산리 1250-12 (농공단지내)

❍ 사 업 비 : 125백만원(국비 100, 도비 7.5, 군비 17.5)

❍ 사업기간 : 2014년

❍ 사업내용 : 톱밥제조기계 1식, 집진기 1식, 이동식 차량 1식

□ 추진실적

❍ 톱밥제조시설 준공 : 1998. 4 ~ 12월

❍ 톱밥(15만포) 공급 : 2013. 1 ~ 12월

□ 추진계획

❍ 톱밥제조시설 교체 사업 : 2014. 3 ~ 10월

❍ 톱밥 생산 공급 : 2014. 12월

□ 기대효과

❍ 산림내 숲가꾸기 사업지에서 발생한 간벌목과 폐잔목 등을 이용해 톱밥을 생산, 저렴한 가격 공급

❍ 양파 및 축산농가 등에 질 좋은 톱밥을 저렴하게 공급하여 농가경영비 절감 효과 기대

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림경영담당 ☏ 5173

목재집하장 톱밥 생산비 지원

원자재 가격상승에 따른 톱밥 생산비 보조로 양파 및 축산농가 애로사항 해결

□ 개    요

❍ 위    치 : 수동면 화산리 1250-12 (농공단지내)

❍ 사 업 비 : 720백만원(군비 150, 자부담 570)

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2014년

❍ 사업내용 : 톱밥 3,600㎥(18만포) 생산

❍ 년차별 투자계획                                 (금액:백만원)

구분	계	2013		2014		2015		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,320		600		720
군비	270	15만포	120	18만포	150
자부담	1,050		480		570

□ 추진실적

❍ 톱밥 생산 보조금 지급(120백만원) : 2013. 3월

❍ 톱밥 3,000원/포 (800원/포 보조) : 2013. 1 ~ 12월

□ 추진계획

❍ 톱밥 생산 보조금 지급(150백만원) : 2014. 3월

❍ 톱밥 3,000원/포 (833원/포 보조) : 2014. 1 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 톱밥 가격 인하에 따른 농가 경영비 절감효과 기대

2014 군정 주요업무

산림녹지과 휴양시설담당 ☏ 5175

친환경적인 대봉산 생태숲 관리운영

❍ 숲해설 및 다양한 체험학습 기회 제공으로 생태숲에 대한 의식 확산

❍ 산림생물자원을 체계적으로 보호, 수집, 증식하여 유전자원 보호

□ 개    요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산 22번지 외 9필

❍ 면    적 : 184ha(국유림 8, 도유림 36, 군유림 126, 사유림 14)

❍ 사 업 비 : 699백만원

(단위 : 명, 식, 백만원)

구 분	합 계	제초 관리	숲생태 관리	숲 해설가	시설물 관 리	산림바이오매스수집단
사역자	49명	5명	1명	3명	1식	40명
사업비	699	29	14	28	30	598

※ 시설물 : 생태학습관, 대봉당

□ 추진계획

❍ 생태숲 관리 : 2014. 1월 ~ 12월

- 생태숲내 야생화원 제초작업

- 공공 시설물 관리 및 유지보수

❍ 체험프로그램 운영 : 2014. 1월 ~ 12월

- 체험종류 : 목공예, 꽃화분만들기, 오카리나(흙피리), 숲속교실 등

- 운 영 자 : 숲 해설가, 숲생태관리인, 인솔교사

□ 기대효과

❍ 생태숲 방문객들에게 체험학습, 휴식공간 제공으로 관광자원화 기여

❍ 산림문화체험 기회 확대로 산림이용 여가문화 조성

2014 군정 주요업무

산림녹지과 휴양시설담당 ☏ 5175

불로장생 산삼 휴양밸리 조성

❍ 고려삼 원조지역인 함양군의 위상제고, 2020년 산삼엑스포 기반 마련

❍ 모노레일 등 체험형 시설로 체류형 휴양단지 조성

□ 개    요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산22번지 일원

❍ 규    모 : 34ha

❍ 사 업 비 : 14,000백만원(도비 10,000, 군비 4,000)

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2016년 (5년간)

❍ 사업내용 : 모노레일 설치 3.95km

❍ 년차별 투자계획                                     (금액:백만원)

구분	계	2012이전		2013		2014		2015이후
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	14,000		2,000		1,500		5,000		5,500
국비	-	기본 및 실시설계	-	진입로정비 L=1.2km	-	모노레일 L=1.99km, 하부 승강장	-	모노레일, 상부승강장 L=1.96km	-
도비	10,000		1,000		1,000		4,000		4,000
군비	4,000		1,000		500		1,000		1,500

□ 추진실적

❍ 기본 및 실시설계 용역 : 2012. 2월

❍ 모자이크 프로젝트사업 재평가 확정 (240억→140억) : 2013. 3월

❍ 보상협의 통보 : 2013. 5월

❍ 산삼휴양밸리 조성사업 진입로 정비공사 시행 : 2013. 11월

□ 추진계획

❍ 불로장생 산삼 휴양밸리 조성사업 시행 : 2014. 1월

(모노레일 1.96km, 하부승강장 1동 설치)

❍ 모노레일 하부승강장 준공 : 2015. 6월

□ 기대효과

❍ 웰빙 체험시설 도입을 통한 연간 75억원 군 재정확충 기여

❍ 세계최초 장거리 모노레일 체험시설로 관광객 증가 기여

2014 군정 주요업무

산림녹지과 휴양시설담당 ☏ 5175

대단위 산림복합경영단지 조성

❍ 산림복합경영으로 산지소득에 대한 인식 제고

❍ 산삼 ‧ 산약초 등 체험 ‧ 분양형 단지조성으로 이용객 참여 유도

□ 개    요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산22번지 일원

❍ 규    모 : 53ha

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000, 도비 500, 군비 500)

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2014년 (3년간)

❍ 사업내용 : 숲가꾸기사업, 작업임도개설, 산삼 산약초 재배단지조성

❍ 년차별 투자계획                                      (금액:백만원)

구분	계	2012		2013		2014		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	2,000		668		668		664
국비	1,000	숲가꾸기,작업임도 L=1.72km	334	작업임도 L=0.7km, 산삼소득지구 4ha	334	관수시설, 산채소득 조성지구	332
도비	500		167		167		166
군비	500		167		167		166

□ 추진실적

❍ 실시설계 용역 완료 : 2012. 2월

❍ 1차공사 착공(작업임도 L=1.72km, 관수시설) : 2012. 4월

❍ 2차공사 착공(작업임도 L=0.7km, 산양삼 및 산채소득지구) : 2013. 3월

□ 추진계획

❍ 3차공사 시행(관수시설, 산채소득지구 등) : 2014. 3월

❍ 3차공사 완료 : 2014. 12월

□ 기대효과

❍ 체험형 산삼, 산약초 산림복합경영단지 조성으로 소득창출 기여

2014 군정 주요업무

산림녹지과 휴양시설담당 ☏ 5175

치유의 숲 조성

❍ 휴양림과 연계한 치유의 숲 조성으로 머무르는 관광 함양 구현

❍ 도시민의 심신 치유를 통한 보건휴양 및 관광함양 기반 구축

□ 개    요(공모사업)

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산1번지 일원(대봉산자연휴양림내)

❍ 규    모 : 65ha

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 2,500, 도비 750, 군비 1,750)

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2015년 (3년간)

❍ 사업내용 : 다목적 치유센터, 맨발황토숲길, 여울숲

❍ 년차별 투자계획                                    (금액:백만원)

구분	계	2013		2014		2015		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	5,000		300		600		4,100
국비	2,500	기본 및 실시설계	150	기반시설, 체험시설	300	치유시설, 휴게시설	2,050
도비	750		45		90		615
군비	1,750		105		210		1,435

□ 추진실적

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 시행 : 2013. 3월

❍ 사전재해, 소규모 환경영향평가 용역착공 : 2013. 10월

□ 추진계획

❍ 1차공사 시행(사업기간 2년) : 2014. 3월

□ 기대효과

❍ 산삼 휴양밸리 조성사업과 연계한 치유의 숲 조성으로 웰빙 함양  이미지 부각

2014 군정 주요업무

산림녹지과 휴양시설담당 ☏ 5175

환경성질환 예방관리센터 조성

치유의 숲, 산삼 휴양밸리 조성과 연계한 환경치유센터 건립으로

질 높은 건강체험 프로그램 개발 보급 운영

□ 개    요(공모사업)

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산17번지 일원

❍ 규    모 : 30ha

❍ 사 업 비 : 7,000백만원(국비 3,500, 도비 1,750, 군비 1,750)

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2016년 (4년간)

❍ 사업내용 : 아토피 치유센터, 식이치유센터 조성

❍ 년차별 투자계획                                     (금액:백만원)

구분	계	2013		2014		2015이후		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	7,000		300		1,600		5,100
국비	3,500	기본 및 실시설계	150	기반정비공사	800	치유센터건립	2,550
도비	1,735		60		400		1,275
군비	1,765		90		400		1,275

□ 추진실적

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 시행 : 2013. 3월

❍ 환경부 치유센터 사업 재평가 : 2013. 11월(12월중 평가완료 계획)

□ 추진계획

❍ 기본 및 실시설계 승인 협의(환경부) : 2014. 2월

❍ 사업 시행(사업기간 3년) : 2014. 4월

□ 기대효과

❍ 도시민의 아토피 등 심신을 치유하여 질 높은 삶의 질 향상 도모

❍ 그린 일자리 및 부가가치 창출로 지역경제 활성화 기여

2014 군정 주요업무

산림녹지과 휴양시설담당 ☏ 5175

산림생태 ‧ 문화체험단지 조성

산삼 휴양밸리 조성사업과 연계한 산림생태 문화체험단지 조성을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 개    요(공모사업)

❍ 위    치 : 병곡면 원산리 산1번지 일원

❍ 규    모 : 142ha(군유림 122ha, 사유림 20ha)

❍ 사 업 비 : 27,000백만원(국비 13,500, 도비 4,050, 군비 9,450)

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2017년(5년간)

❍ 사업내용 : 산림휴양시설, 산림문화체험시설, 산림교육장, 힐링숲 조성

❍ 년차별 투자계획                                    (금액:백만원)

구분	계	2013		2014		2015이후		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	27,000		1,000		3,400		22,600
국비	13,500	기본 및 실시설계	500	진입도로 정비 L=2.0km	1,500	기반정비 및 휴양시설	11,500
도비	4,050		150		450		3,450
군비	9,450		350		1,450		7,650

□ 추진실적

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 시행 : 2013. 6월

❍ 행정절차이행 : 2013. 10월

□ 추진계획

❍ 사업 시행 : 2014. 6월(진입도로 정비공사 우선 시행)

※ 연차적으로 사업시행

□ 문제점 및 대책

❍ 산주 부동의로 사유지(4필지 202,878㎡) 매입 애로

→ 지속적인 지주 방문 설득과 사업추진 협조 요청

□ 기대효과

❍ 산림을 활용한 다양한 생태 문화 체험으로 기회제공 및 관광함양 기반 마련

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산삼담당 ☏ 5174

산림청 공모사업 추진

산림소득 사업의 공모를 통해 경쟁력 있고 우수한 생산자 단체를  선정함으로서 산림소득 사업의 규모화 및 내실화 추진

□ 개    요(공모사업)

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 계속

❍ 2014 사업현황

사업명	대상지역	예산액(백만원)
		계	국비	도비	군비	자부담
계		515	216	52.3	78.7	168
산림작물생산단지조성	함양읍	325	130	32.5	32.5	130
대단위 복합 경영	서하면	90	36	10.8	25.2	18
	함양읍	100	50	9	21	20

□ 그동안의 실적

❍ 기  간 : 2009 ~ 2013년

❍ 사업비 : 11,230백만원

❍ 사업내용 : 임산물산지종합 유통센터, 산림작물 생산단지 조성

❍ 대상자 : 소리마을영농조합법인 외3개 단체

□ 추진계획

❍ 사업내용 : 산림소득작물과 관련된 생산기반조성 등

❍ 추진일정

- 공모사업 신청 및 선정 : 2013. 8월 ~ 9월

- 보조금 교부 신청 : 2014. 1월 ~ 2월

- 사업시행 및 정산 : 2014. 3월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 체계적인 생산기반 조성을 통한 소득증대 및 지역경제 활성화

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산삼담당 ☏ 5174

함양 산삼축제 개최

전국의 건강웰빙을 대표하는 축제로 관광함양의 이미지 제고와 산양삼 판로 개척을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 개    요

❍ 기  간 : 2014. 7월말 ~ 8월초

❍ 장  소 : 상림공원 일원

❍ 예산액 : 490백만원(국비 42, 도비 35, 군비413)

❍ 주최/주관 : 함양군/함양산삼축제위원회

□ 그동안의 실적

❍ 최초개최 : 2004년도

❍ 개최실적(2004 ~ 2013년)	(단위 : 백만원, 만명)

구 분	예산액	방문인원	경제효과	비 고
함양산삼축제	2,710	363	77,250

□ 추진계획

❍ 행사내용 : 체험, 전시, 공연, 경연, 판매 등

❍ 추진일정

- 보조금 교부결정 및 교부 : 2014. 1월

- 축제 준비 : 2014. 2월 ~ 7월

- 제11회 함양산삼축제 개최 : 2014. 7월 ~ 8월

- 결산 및 정산 : 2014. 9월

□ 기대효과

❍ 축제를 통한 관광함양의 이미지 제고 및 지역경제 활성화

❍ 함양 농특산물의 다양한 판로 개척으로 농가소득 증대

	Ⅲ. 특수시책

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산림경영담당 ☏ 5173

산악레포츠 테마임도 조성

산림내 임도를 활용한 산악레포츠 테마임도 개설로 관광 함양의 이미지 구축

□ 개    요

❍ 위    치 : 백전면 오천리 ~ 병곡면 연덕리 일원

❍ 사 업 량 : 22km

❍ 사 업 비 : 금1,500백만원(국비 750, 도비 225, 군비 525)

❍ 사업기간 : 2014년

❍ 사업내용

- 기 개설 : 16km

- 신규 개설 : 6km

□ 추진실적

❍ 16km 임도개설 : 1998 ~ 2012년

❍ 함양군수배 MTB 산악자전거대회 성공 개최 : 2012.7.22

(1,000명 참가)

❍ 제1회 경남 도지사배 전국 산악자전거대회 개최완료 : 2013.7.28.

(1,165명 참가)

□ 추진계획

❍ 실시설계용역 시행 : 2014. 1월

❍ 사업시행 : 2014. 4월

❍ 사업완료 : 2014. 12월

□ 기대효과

❍ 다양한 임도 활용을 통한 MTB 도로 개설을 통한 관광함양 이미지 구축 및 지역경제 활성화 기여

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산삼담당 ☏ 5174

산양삼 시범지구지정 항공살포 추진

불특정 다수임야에 함양의 명물인 산양삼을 살포하여 산삼의 고장 함양의 브랜드 가치 증대

□ 개    요

❍ 사 업 지 : 군유림(병곡 원산, 광평, 서상 옥산), 간벌 대상지

❍ 사 업 비 : 25백만원 (군비)

❍ 사 업 량 : 250kg

❍ 사업기간 : 2014. 10월 ~ 11월

❍ 종    자 : 산양삼

□ 추진계획

❍ 대상지 점검 및 선정 : 2014. 6월

- 군유림 중 간벌대상지 선정(최적의 대상지 선정)

❍ 대상지 정리 : 2014. 7월

❍ 함양항공관리소 헬기 요청 : 2014. 8월

❍ 종자 구입 : 2014. 9월

❍ 사업 시행 : 2014. 10월 ~ 11월

□ 기대효과

❍ 세계산삼엑스포 개최를 위한 생산 인프라 구축

❍ 확대 재배를 통한 농가소득 및 지역경제 활성화 기여

❍ 최소의 노동력을 활용한 새로운 재배방법 시도

2014 군정 주요업무

산림녹지과 산삼담당 ☏ 5174

산양삼가공상품화 및 체험관광육성사업(향토산업)

1차적 생산을 기반으로 늘어나는 산양삼 물량을 해소하고 부가가치가 높은 상품을 개발하여 농가소득 및 지역경제 활성화 도모

□ 개    요(공모사업)

❍ 사 업 지 : 함양군 관내

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(국비 1,500, 도비 180, 군비 420, 자부담 900)

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년

❍ 사업대상자 : 인산죽염촌, 함양산양삼협회영농조합법인, 지리산국화주

❍ 년차별 투자계획

(금액 : 백만원)

구분	계	2013	2014	2015	비고
계	3,000	580	1,315	1,105
국 비	1,500	300	500	700
도 비	180	36	85.5	58.5
군 비	420	84	199.5	136.5
자부담	900	160	530	210

□ 추진실적

❍ 사업단 등록 : 2013. 7. 2

❍ 집 행 액 : 자본보조 2억원, 경상보조 1억5백만원

□ 추진계획

❍ 2014년 사업계획서 확정 : 2014. 1월

❍ 시장개척 및 판촉행사 외 9건 추진 : 2014. 2월∼

❍ 3개 가공업체 가공생산 설비 구축(민간자본보조) : 2014. 2월∼

□ 기대효과

❍ 함양산양삼 다양한 가공제품 생산으로 농가소득 증대

❍ 함양산양삼 생삼위주의 판매→제품 위주 판매로 전환