상하수도사업소

Ⅰ. 2015 주요성과	429

Ⅱ. 2016 업무추진 방향	431

Ⅲ. 2016 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 유림지구 광역 마을상수도 개발사업	435

□ 지곡 농어촌 지방상수도 확충사업	436

□ 병곡 농어촌 지방상수도 확충사업	437

□ 유림우동지구 마을하수도 설치사업	438

2. 역점(특수)시책

□ 함양정수장 유휴부지 활용 공원(시비) 조성	439

3. 일반계속사업

□ 마을상수도 운영 및 정비사업	440

□ 안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충	441

□ 함양군 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)	442

Ⅰ		2015 주요성과

□ 각종 수상 현황

수상명	수상일자	주최/주관	비 고
2014년도 수도사업 운영 및 관리실태 평가 최우수	2015. 4. 2.	환경부	포상금 2천만원
2015년도 지자체 하수분야 평가 우수	2015. 6. 5.	낙동강유역환경청
2015년 하반기 물관리 우수기관	2015. 9. 9.	환경타임즈, 환경방송GKBS / (국회환경노동위)

□ 지방상수도 안정적인 원수확보 및 공급

❍ 서상 농어촌지방상수도 개발사업(관로 21km, 6,590백만원)

❍ 유수율 제고사업 : 20건 1,134백만원

❍ 급수구역 확대사업 : 3건 996백만원

❍ 지방상수도 보조수원지 확보사업 : 1건 644백만원

❍ 기술진단에 따른 정수장 보강사업 : 6건 125백만원

□ 맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급

❍ 원수 부족, 수질불량, 노후 시설의 개량정비로 군민보건 향상

❍ 인구 노령화에 따른 전문업체  위탁관리로 안정적인 생활용수 공급

- 11개 읍면 274개 시설 → 3개 전문업체 위탁

□ 지속적인 하수처리시설 확충으로 수질개선

❍ 함양공공하수처리시설 증설사업 완료 : 증설 2,600㎥/일, 7,100백만원

❍ 안의 용추계곡지구 하수관로 설치 :　L= 16.5Km,  2,679백만원

❍ 덕암마을 하수도 설치사업 추진 : 45㎥/일, 1,600백만원

❍ 함양 하수관거 정비 BTL사업 추진

- 사 업 비 : 35,145백만원

- 사 업 량 : 관거정비 L= 30.4Km, 배수설비 2,719가구

- 2015. 7. 20. ~ 2017. 9. 19.(26개월)

□ 맑고 안정된 물 관리와 쾌적한 도시기반시설 마련으로

군민 복지향상과 3만불시대에 걸맞는 상하수도 행정에

전력을 다해 왔습니다.

Ⅱ		2016 업무추진 방향

군민 3만불시대를 여는 군민 물복지 실현

	목 표
지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성 맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대
	중점과제
지방상수도 급수구역 확대유지로 안정적인 맑은물 공급 유수율 제고사업 및 하수처리시설 확대사업 유치 노력 마을상수도 유지관리로 생활용수의 안정적 공급 상하수도관리 중장기 계획에 의한 체계적인 관리 방안 마련

	Ⅲ. 2016 주요업무 계획

1

1

유림지구 광역 마을상수도 개발사업

관리담당 ☏ 5231

신규사업

❍ 유림지구 노후된 소규모 수도시설을 통합, 광역 마을상수도 설치

❍ 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적 공급으로 군민 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 유림면(12개 마을)

(우동, 화촌, 장항, 회동, 유평, 옥산, 화암, 판문, 지곡, 손곡, 창촌, 서주)

❍ 시설용량  : 360m³/일

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4년)

❍ 총사업비  : 6,063백만원(지특 4,244, 군비 1,819)

구 분	총계		2016		2017년도		2018이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		6,063		270		4,290		1,503
실시설계용역	1식	757	1식	270
도수.배수관로	L=14.5km	3,503			L=10.0km	3,000	L=4.5km	503
급수관로	L=8.7km	1,536			L=2.5	536	L=6.2km	1,000
취.정수시설	1식	222			1식	222
통합관리시스템	1식	45			1식	45
부대공사					1식	487

□ 추진계획

❍ 유림지구 주민공청회 개최 : 2016년 4월

(기. 이장단 회의 시 사업계획 설명 완료)

❍ 실시설계용역 : 2016년 5월(군비)

❍ 우동·화촌지구 하수관로 정비사업과 병행하여 상수도 급수관로 정비 : 2016년 12월

❍ 지역개발 특별회계 소규모수도시설 개량사업 국비확보 : 2016년 10월

□ 기대효과

❍ 수질과 수원이 양호한 광역 마을상수도 설치와 노후관로를 교체하여

맑고 깨끗한 생활용수를 안정적 공급함으로서 군민 삶의 질 향상

1

2

지곡 농어촌 지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5101

신규사업

❍ 지곡지구에 원활한 지방상수도 공급 ․ 확대를 통한 주민생활

불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

❍ 함양·안의지방상수도 순환배수관로 설치를 통한 향후 원수부족

등 각종 사고 시 신속대응체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 지곡면 일원(9개마을, 882여명)

❍ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 12월

❍ 사업계획                                             (단위 : 백만원)

구분	사 업 비			사 업 량		비고
	계	지특	지방	시설	관로시설
지곡지구	6,960	4,872	2,088	가압장 1개소	29.1km	시목․봉곡․수여․마산․덕암․오평․창촌․개평․상개평

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월

❍ 주민설명회 및 행정절차 이행 : 2016년 3월 ~ 7월

❍ 사업규모 : 실시설계 1식(관로 L=29.1km, 가압장 1식)

❍ 사 업 비                                             (단위 : 백만원)

사업명	총사업비		기투자	2016년	2017년이후	비고
지곡 농어촌 지방상수도 개발사업	총계	6,960	-	294	6,666	2016 ~2018
	국비(70%)	4,871	-	205	4,667
	군비(30%)	2,088	-	89	1,999

□ 기대효과

❍ 함양·안의상수도의 순환배수관로 설치로 용수공급의 안정성 확보

❍ 지곡면 일원의 지방상수도 급수로 주민생활 편의 제공

1

3

병곡 농어촌 지방상수도 확충사업

상수도담당 ☏ 5101

신규사업

❍ 병곡지구에 원활한 지방상수도 공급 ․ 확대를 통한 주민생활

불편 해소 및 보건위생 향상에 기여

❍ 옥계저수지 용수를 활용한 안정적인 원수확보로 향후 원수부족

등 각종 사고 시 신속대응체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 일원(12개마을, 794여명)

❍ 사업기간 : 2016. 7월 ~ 2018. 12월

❍ 사업계획                                             (단위 : 백만원)

구분	사 업 비			사 업 량		비고
	계	지특	지방	시설	관로 시설
병곡 농어촌 지방상수도 확충사업	6,845	4,792	2,053	배수지 1개소 가압장 2개소	18.5km	가촌․휴촌․송평․덕평․토내․소현․ 신기․하대평․백현․대평․양천․음천

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2015년 10월 ~ 16년 6월

❍ 주민설명회 및 행정절차 이행 : 2016년 2월 ~ 6월

❍ 사업규모 : 실시설계 1식(관로 L=18.5km, 배수지 1개소, 가압장 2개소)

❍ 사 업 비                                             (단위 : 백만원)

사업명	총사업비		기투자	2015년	2016년이후	비고
병곡 농어촌 지방상수도 개발사업	총계	6,845	-	200	6,645	2016 ~2018
	국비(70%)	4,792	-	-	4,792
	군비(30%)	2,053	-	200	1,853

※ 2015년 제2회 추경 시 실시설계비 200백만원 확보

□ 기대효과

❍ 병곡면 일원의 지방상수도 급수로 맑고 깨끗한 물 공급

❍ 가뭄대비 옥계저수지 용수사용으로 원수공급의 안정성 확보

1

4

유림우동지구 마을하수도 설치사업

하수도담당 ☏ 5233

신규사업

❍ 남강댐 상류지역 물 자원의 효율적 운용관리로 공공수역의 수질개선

❍ 생활 필수기반 시설인 하수도정비로 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 유림면 화촌리(우동,화촌)

❍ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 12월

❍ 사 업 량 : 하수처리장(Q=80㎥/일), 하수관로 L=6.0km

❍ 총사업비 : 2,800백만원(국비 1,960 지방비 840)

□ 추진계획

❍ 기본 및 실시설계 : ’13. 11월

❍ 처리장 부지매입 : ’14. 4월

❍ 환경부 재원협의 및 사업인가 신청 : ’15. 12월

❍ 마을상수도 병행시행 협의 : ’16. 1월

❍ 사업시행 : ’16. 3월 ~ ’18. 12월

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2015 이전 (기투자)		2016 계획		2017년		2018년
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 80㎥/일 관로 3.5km	2,800	실시설계 1식	50	처리장 80㎥/일	429	관로 3.0km	1,160	관로 3.0km	1,161
국 비		1,960		-		300		830		830
도 비		420		-		64		178		178
군 비		420		50		65		152		153

□ 기대효과

❍ 유림면 소재지 하수도 정비사업을 통해 쾌적한 정주여건 조성

❍ 유림지구 광역 마을상수도 사업 병행시행으로 예산절감 및 주민

생활 편의 제공

1

1

함양정수장 유휴부지 활용 공원(시비) 조성

상수도담당당 ☏ 5232

역점 및 특수시책

❍ 함양 정수장 유휴부지 활용으로 쾌적한 정수장 조성

❍ 정수장을 찾는 방문객에게 맑고 깨끗한 지방상수도 이미지 제고

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 함양읍 대덕리 정수장지내

❍ 유휴부지 : 2,900㎡

❍ 사 업 량 : 시비설치 및 조경사업 등

❍ 사 업 비 : 100,000천원

❍ 사업기간 : 2016. 4월 ~ 2016. 12월

※ 「함양군 나무은행 설치 및 운영조례」와 연계시행

□ 추진계획

❍ 실시설계 : 2016. 1월 ~ 2016. 3월

❍ 사업시행 : 2016. 4월

❍ 사업완료 : 2016. 12월

□ 기대효과

❍ 쾌적한 정수장 조성 및 맑고 깨끗한 이미지 조성

❍ 함양군 나무은행 설치 및 운영조례 연계로 인한 예산절감

❍ 군민 문예활동 참여확대 및 증진 기여

□ 전경사진

함양정수장

사업대상지

❍ 인구 노령화에 따른 수질 및 시설 운영 전문업체 위탁 운영

❍ 누수, 원수부족, 수질불량 시설에 개량 정비로 생활용수를 안정

적으로 공급하여 군민 삶의 질 향상

1

1

마을상수도 운영 및 정비사업

관리담당 ☏ 5231

일반계속사업

□ 개    요

사업명	사 업 량	사업비(백만원)	비고
계		1,495
마을상수도 운영 및 유지관리	- 긴급보수 1식 - 시설물유지관리 (물탱크6개소, 염소투입기10개, 지하수보호공5개, 취수원보강3개소) - 농촌형 소방용수 개.보수 50건	405
마을상수도 노후관로 교체	- 노후관로 교체 L=5km (화촌,우동,거기(양지),사안,진관,주암)	210
소규모 수도시설 개량	- 소규모수도시설개량 5개소 L=8km (마천당흥, 유림옥동, 수동내백, 안의상비, 백전서백,)	880

□ 추진계획

❍ 마을상수도 위탁관리 : 2016. 1. ~ 12.

❍ 마을상수도노후관로 교체 시행 : 2016. 3. ~ 11.

❍ 소규모 수도시설 개량 : 2016. 3 ~ 11

❍ 사업 내용

- 마을상수도 운영 및 유지관리(11읍면 274개소) 405백만원

- 마을상수도 노후관로 교체 6개소(화촌,우동,거기(양지),사안,진관,주암) 210백만원

- 소규모수도시설개량 5개소(마천당흥,유림옥동,수동내백,안의상비,백전서백,) 880백만원

□ 기대효과

❍ 맑고 깨끗한 생활용수 공급으로 군민 삶의 질 향상

안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충으로 서상․서하․안의지구에

원활한 지방 상수도 공급 및 확충

1

2

안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충

상수도담당 ☏ 5232

일반계속사업

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양군 서상·서하·안의면 일원(3개면, 52마을, 7,800명)

❍ 사업기간 : 2016. 12월 ~ 2017. 12월

❍ 사업계획

단위사업	사 업 량			사 업 비(억원)			비고
				계	광특	지방
계				5,373	3,761	1,612
서상농어촌 지방상수도 개발사업	대남저수지 V = 643,000㎥	정수시설 3,700㎥/일	관로시설 74㎞	3,230	2,261	969	`16년 준공
서상농어촌 급수구역 확충사업	배수지 1개소 V = 1,800㎥	가업장 6개소	관로시설 44㎞	2,143	1,500	643	`17년 준공

□ 추진계획

❍ (서상농어촌 지방상수도 개발사업) : 서상면, 서하면, 안의면 지방상수도 미급수지역에 상수도 급수를 위한 배수관로 설치사업

- 사 업 량 : 가압장 5개소, 배수관로 9.2km

- 사업기간 : 2016. 2월 ~ 12월

- 사 업 비 : 3,230백만원

❍ (서상농어촌 급수구역 확충사업) : 서상면, 서하면, 안의면 지방상수도 미급수지역에 상수도 급수를 위한 급수관로 설치사업

- 사 업 량 : 급수관로 16km

- 사업기간 : 2016. 2월 ~ 12월

- 사 업 비 : 2,143백만원

□ 기대효과

❍ 서상, 서하, 안의면 지방상수도 급수로 주민생활 편의 제공

❍ 급수구역 확대로 군민 삶의 질 향상

1

3

함양군 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)

하수도담당 ☏ 5233

일반계속사업

❍ 하수관로를 우·오수 분리하여 하수처리로 수처리 효율성 향상

❍ 함양읍 시가지 우수관로정비로 강우시 도심의 원활한 배수

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 시가지

❍ 사업기간 : 2015. 7. ~ 2017. 9.(26개월)

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=30.4km, 배수설비 2,719개소

❍ 총사업비 : 35,145백만원

□ 추진계획

❍ 하수관로정비 BTL 사업선정(환경부) : ’12. 4월

❍ 대상사업지정 및 기본계획수립 고시 : ’13. 12월

❍ 우선협상 대상자 선정 : ’14. 4월

❍ 사업시행자 선정 및 실시협약 체결 : ’14. 11월

❍ 실시계획 실시 : ’14. 11월 ~ ’15. 4월

❍ 실시계획 승인 및 고시 : ’15. 7월

❍ 사업착공 및 준공 : ’15. 7월 ~ ’17. 9월

❍ 위탁운영 및 운영성과 평가(20년) : ’17. 9월 ~ ’37. 9월

□ 기대효과

❍ 하수관로 우·오수 분리하여 안정적 하수처리 및 수처리 효율향상

❍ 건물 신축 시 정화조 미설치로 주민부담 경감

❍ 함양읍 합류식 하수관거를 분류식 정비로 쾌적한 시가지 환경조성