농 축 산 과

Ⅰ. 2017 업무추진 방향	313

Ⅱ. 2017 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 함양․산청 가축시장 통합 이전 추진	317

2. 역점(특수)시책

□ 대규모 신규 축산단지 조성	318

□ LH 귀농․귀촌 주택단지 리츠 시범사업공모	319

3. 일반계속사업

□ 함양농업타운 조성	320

□ 가축유전자센터이전	321

□ 과학영농시범포온실조성공사및청사관리 323

□ 농업인 지원사업 추진	324

□ 소득특화자금 융자지원사업	325

□ 축산물 생산성 향상 사업	326

□ 조사료 생산기반 확충	327

□ 가축분뇨처리지원사업	328

□ 말산업 육성 지원	329

□ 구제역, AI 등 가축전염병 예방	330

□ 쇠고기 이력제 및 축산물 위생 관리	331

□ 체류형 농업창원지원센터 건립	332

□ 도시민 농촌유치지원사업	333

Ⅰ		2017 업무추진 방향

민선6기 농업소득 3만불 달성 기반구축

	전략목표
농업소득 3만불 달성을 위한 중장기 농업발전 로드맵 수립 및 추진 대규모 축산단지 조성 및 번식기반 확충으로 축산 경쟁력 강화 체계적인 가축방역 시스템 구축으로 가축 전염병 제로화
	단위사업
대규모 신규 축산단지 조성 함양․산청 가축시장 통합 이전 추진 LH 귀농․귀촌 주택단지 리츠 시범사업 공모 ④ 함양농업타운 조성 ⑤ 가축유전자원센터 이전 ⑥ 과학영농시범포 온실 조성공사 및 청사관리 ⑦ 농업인 지원사업 추진 ⑧ 소득특화자금 융자지원 사업 ⑨ 축산물 생산성 향상 사업 ⑩ 조사료 생산기반 확충 ⑪ 가축분뇨처리지원사업 ⑫ 말산업 육성 지원 ⑬ 구제역, AI 등 가축전염병 예방 ⑭ 쇠고기 이력제 및 축산물 위생 관리 ⑮ 체류형 농업창원지원센터 건립 ⑯ 도시민 농촌유치지원사업

2020 함양 산삼 항노화 엑스포

항노화의 중심 역동하는 함양

	Ⅱ. 2017 주요업무 계획

1

1

함양·산청 가축시장 통합 이전 추진

축산담당 ☏ 5243

신규사업

❍ 기존 가축시장이 협소하여 주정차 공간이 부족하기에 인근 주민

불편 초래

❍ 산청 가축시장과 통합하여 지역 경제 활성화 및 농가소득증대에 기여

□ 개   요

❍ 위    치 : 1개소(산청군과 연접한 지역 선정)

❍ 면    적 : 30,000㎡

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2018년

❍ 사 업 비 : 1,750백만원

❍ 사 업 량 : 기반정비 30,000㎡, 가축시장 건물 신축 1,500㎡

❍ 사업내용 : 기반정비 및 건축물 건립

□ 추진계획

❍ 지역특화사업 신청 : 2017. 1월

❍ 가축시장 통합 계획 수립 : 2017. 3월

❍ 가축시장 통합 함양, 산청 주민 여론 수렴 : 2017. 6월

❍ 사업 예정지 부지 선정 : 2017. 9월

❍ 사업예정지 부지 매입 : 2018. 3월

❍ 사업착공 : 2018. 5월

❍ 사업준공 : 2018. 10월

❍ 함양 산청 가축시장 통합 운영 : 2018. 11월

□ 기대효과

❍ 가축시장 통합운영으로 비용절감 및 지역경제 활성화 기대

❍ 경락가격 상승으로 인한 축산농가 소득 창출

1

1

대규모 신규 축산단지 조성

축산담당 ☏ 5243

역점 및 특수시책

❍ 민원 발생없는 안전지대에 축산단지를 조성하여 사육규모 확대

❍ 대규모 축산단지 조성하여 군민소득 3만불 시대 기여

□ 개    요

❍ 위    치 : 미정

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2018년(2개년)

❍ 추정사업비 : 50억원정도

❍ 사 업 량 : 1개소(3,000두 이상 사육규모 조성)

❍ 추진방법 : 행정에서 기반 정비 후 축산농가에 축사부지 분양

□ 추진계획

❍ 추진일정

- 축산단지 조성을 위한 예정지 조사 : 2017. 1 ~ 4월

- 사업 예정지 인근 마을 간담회 개최 : 2017. 6월

- 기본계획 수립 및 용역발주 : 2017. 7월

- 부지 및 지장물 매입 보상 : 2018. 1 ~ 4월

- 진입도로 개설 및 부지조성 토목공사 : 2018. 5 ~ 10월

- 입주 신청 및 축사시설 설치 : 2018. 10 ~ 2018. 12월

❍ 기반조성 사업비 국도비 확보를 위한 토지 소유자 및 주민 동의서 징구

❍ 효율적인 분뇨처리 시스템 적용으로 악취 없는 청정 축산실현

□ 기대효과

❍ 대규모 축산단지 조성으로 사육규모 확대 및 안정적 소득기반 마련

❍ 개방화 시대에 대응한 경쟁력 있는 축산기업 활성화

1

2

LH 귀농·귀촌 주택단지 리츠 시범사업 공모

귀농귀촌담당 ☏ 5245

역점 및 특수시책

❍ 한국토지주택공사에서 농어촌 인구유입을 통한 경제활력 지원

❍ 귀농·귀촌인의 주택지원으로 안정적 정착 기회제공

□ 사업개요

❍ 공모사업 공고 : 2016. 8. 25

❍ 사업 설명회   : 2016. 9. 7.(LH본사)

❍ 신청서류 접수 : 2016. 10. ~ 10. 14(LH본사)

❍ 우선협정대상자 확정 : 2016. 10. 28.

❍ 리츠시범사업 업무 협약식 : 2017. 1. 10.(LH본사)

❍ 사업내용

- 위 치 : 지곡면 덕암리 산63번지외 14필지

- 부지조성 : 29,285㎡(호당463㎡)

- 전원형 주택조성  : 60동(3.3㎡당 6백만원내외 분양)

- 한국토지주택공사 : 리츠설립(자금지원,건축,분양 및 임대)

- 지자체 : 후보지선정,인허가여부파악,귀농·귀촌자홍보,인센티브사업지원

□ 추진성과 및 향후계획

❍ 2016. 9. 25. : 예정지 장소선정

❍ 2016. 9. 30. : 대상지 인허가여부 확인

❍ 2016. 10.12. : 공모사업신청

❍ 2016. 10.28 : 우선 협상대상자 선정

❍ 2017. 1. 10 : 협약체결식( LH본사 군수님 참석 )

❍ 2017. 6. 10 : 설계시공,금융사선정,행정절차이행,토지감정

❍ 2017. 10.10 : 상호부동산 신탁해지,토지매입,착공

❍ 2018. 12.30 : 입주자선정 및 분양

□ 기대효과

❍ 전원주택 제공으로 귀농·귀촌 희망자 수요에 적극대응

❍ 귀농귀촌자의 입주에 따른 경제적 부담완화로 조기정착유도

❍ 농업관련기관 유치 및 인프라 확충으로 원스톱 농업서비스 제공

❍ 농업기술센터 주변을 함양농업 중심지로 육성

1

1

함양농업타운 조성

농정기획담당 ☏ 5241

일반계속사업

□ 사업개요

❍ 총 사업기간 : 2016 ~ 2020년

❍ 사 업 비 : 387,934천원(도급 333,604, 관급 및 폐기물 처리 54,330)

- 금회 공사기간 : 2016. 6. 7 ~ 2017. 12. 6

❍ 사 업 량 : A = 33,963㎡, 부지조성, U형 측구, 가설휀스 등

❍ 위    치 : 함양읍 이은리 1139-99번지 일원

□ 추진방향

❍ 함양농업타운을 농업과 관련된 기관 및 시설 유치

❍ 농업기술센터와 연계한 다양한 활용방안 구상

❍ 농업관련기관 유치를 위한 기관 방문

□ 추진계획

❍ 하천기본계획 종료후 용도폐지 협의(안전건설과) : 2017. 1월

❍ 축사부지 철거 및 폐기물 처리 : 2017. 2월 ~ 3월, 20,000천원

❍ 하천부지 매입 경남도 협의 : 2017. 3월 ~ 4월

❍ 하천부지 매입계획 수립 : 2017. 5월(도 협의 완료 후)

❍ 하천부지 매입(16,333㎡) : 2018년 예정(16억원 정도 소요)

❍ 농업관련기관 유치 지속 협의 : 2018. 12월

❍ 농업관련 기관 입주 : 2020. 12월

- 농산물품질관리원, 농어촌공사, 산림조합, 함양농협 등

❍ 가축질병으로부터 우량 유전자원의 안전한 보존을 위한 이전

❍ 우량 축산유전자원을 우리군에 최우선 보급하여 축산발전 도모

1

2

가축유전자원센터 이전

농정기획담당 ☏ 5241

일반계속사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년

❍ 사업비(최종) : 1,176억원(공사비 732, 보상비 355, 기타용역비 89)

❍ 위    치 : 서상면 상남리 산 30번지 일원, 319㏊

❍ 근무인원 : 52명(정규직 23명, 비정규직 29명)

❍ 사업규모 : 연구동, 사육시설 등 40동 47,000㎡ 초지조성 210ha

□ 추진실적

❍ 2011. 3. ~ 6월 : 이전 타당성 용역 및 이전 적지 선정 용역(농진청)

❍ 2011. 10월 : 함양군이 최종 이전 후보지로 선정

❍ 2011. 12. 9 : 서상주민 진정민원 접수(145명), 반대추진위원회

❍ 2012. 9. 7 : 용역 최종보고

- 함양으로 이전하는 것이 타당하다는 결론임

❍ 2013. 5. 28 : 함양군-농촌진흥청 사업이전 MOU 체결

❍ 2014. 7. 8 : 추진위원장(위원장 : 홍덕용) 12개 항목에 대한 건의사항 제출(주민건의사항 및 처리방안 별첨)

❍ 2014. 8. 5 : 가축유전자원센터 이전 사전 주민설명회(이장회의시)

❍ 2014. 8. 8 : 가축유전자원센터 이전 주민설명회(전체 주민)

❍ 2014. 10월 : 가축유전자원센터 시설결정 구역선 토지매입선 확정

(시설결정 구역 319ha, 토지매입 구역 335ha)

❍ 2014. 10. 22 : 주민 보상설명회(토지소유주)

❍ 2014. 11. 6 : 보상협의회 개최

❍ 2014. 12월 ~ 2015. 11월 : 토지적성평가, 환경영향평가 등 인허가 절차 이행

❍ 2015. 12. 24 : 함양군관리계획(군계획시설 : 연구시설) 결정

❍ 2015. 1월 : 분묘이전지 조성 부지 결정(상남리 산145번지)

❍ 2016. 6월 ~ 11월 : 분묘이전지 조성공사 완료(40여기 수용)

❍ 2016. 9. 27 : 개발촉진지구(상남리조트) 해제

❍ 2016. 9월 : 사업비 조정 및 실시설계 완료(농진청)

❍ 2016. 12월 : 공사계약 완료(건축, 감리계약 완료)

< 협의손실보상 세부내역 (‘17.1.3. 현재) >

(단위 : 천㎡, 백만원)

구 분	전체			협의
	필지(건)	면적(A)	금액	필지(건)	면적(B)	금액	협의율 (B/A)
토 지	579	2,827	19,895	451	2,595	18,135	91.76
물 건	3,225	-	14,677	2,706	-	12,952
총 계	3,804	2,827	34,572	3,157	2,595	31,087

※ 국유지 52ha 제외

□ 추진계획

❍ 실시계획 인가 완료 : 2017. 2월

❍ 공사 착공 및 완료 : 2017. 2월 ~ 2019. 2월(2년간)

❍ 과학영농 시범포 첨단 온실 조성으로 농업인 현장 교육장 활용

❍ 조경 추가공사등을 통한 신청사의 효율적인 관리

1

3

과학영농시범포 온실 조성공사 및 청사관리

농정기획담당 ☏ 5241

일반계속사업

□ 과학영농시범포 온실조성공사

■ 사업개요

❍ 사 업 비 : 1,285,817천원(도급 1,240,805천원, 관급 45,012)

❍ 공사기간 : 2016. 7. 5 ~ 2017. 9. 27

❍ 공사규모 : 지상1층-7동, 위험물처리시설(유류탱크) 1기

- 건축면적 2,388㎡(유리온실 1동 448㎡, 연동형 비닐하우스 4동 2,240㎡, 광폭형 비닐하우스 2동 468㎡)

■ 추진상황 및 계획

❍ 현재 추진상황(2017. 1. 3일 현재) : 45%

■ 추진계획

❍ 전기 간선공사 시행 : 1월 ~ 2월(공사비 40,000천원 정도)

- 설계 : 1월 완료 예정

□ 청사관리

■ 개    요

❍ 면    적 : 대지 49,980㎡, 건축면적 2,284㎡, 연면적 4,956㎡

❍ 건물구성 : 본관동, 농산물종합가공센터, 종합검정실

❍ 사 업 비 : 618,164천원(청사관리 288,164, 시설비 330,000)

❍ 사업내용

- 시설비 : 창고건립(100평) 1식, 부대 조경공사 1식

- 청사관리 : 물품구입, 식당운영, 전기 기계실 등 청사 전반 관리

■ 추진계획

❍ 창고건립 : 2월 설계, 3월 ~ 6월 공사 시행

❍ 조경공사 : 2월 설계, 3월 ~ 6월 공사 시행

❍ 무인경비, 승강기 유지관리, 전기안전검사, 폐수처리시설 유지관리, 소방안전관리, 조경관리, 제초 등

1

4

농업인 지원사업 추진

농업지원담당 ☏ 5242

일반계속사업

❍ 각종 농업직불금과 농작물 재해보험 등의 지원으로 농가의 소득 보전

❍ 농가의 경영개선을 통한 농업인의 삶의 질 향상에 기여

□ 추진방향

❍ 각종 농업직불금의 지급으로 농업인의 소득 보전에 기여

❍ 자연재해로 인한 경제적 손실 보전과 여성 농업인의 삶의 질 향상 도모

❍ 농업직불금 : 7,067ha, 5,622백만원 지원

- 쌀소득보전고정직접지불금 : 4,386ha 4,358백만원

- 밭농업직불금 : 1,504ha 125백만원

- 조건불리직불금 : 946ha 479백만원

- 친환경농업직불 : 231ha 660백만원

❍ 농작물 재해보험 : 1,500호, 980백만원 지원

- 30개 품목(사과, 배, 단감, 떫은감, 복숭아 등)

❍ 농가도우미 지원 : 26호,88,920천원(자부감 15%,38,000원(32,300원)

❍ 여성농업인 브라보 바우처사업 :940명,94백만원(1인당10만원,자부담 2만원)

□ 추진계획

❍ 농업직불금 사업 추진

- 신청 접수 및 사업등록 신청 : 2017. 1~4월

- 신청자 정보공개, 신청내용 현지조사 및 심사, 등록증 교부 : 2017. 5월

- 등록내용 변경신청, 농지형상 점검 : 2017. 6~9월

- 토양 농약잔류 검사 : 2017. 6~11월

- 농업직불금 지급 : 2017. 12월

❍ 농작물 재해보험 :가입률 저조 품목 순회 방문지도, 가입 장려와 시책홍보

❍ 농가도우미 : 출산 전, 후 180일 기간 중 90일 지원

1

5

소득특화자금 융자지원 사업(특별회계)

농업지원담당 ☏ 5242

일반계속사업

❍ 소득특화자금 융자로 농업인의 자립기반 구축

❍ 영농에 필요한 긴급자금을 융자함으로 농업인의 영농의지 고양

□ 추진방향

❍ 지원대상 : 농업인, 농업관련 관련 법인 및 단체

❍ 사업기간 : 1993년 ~ (계속사업)

❍ 사업내용

- 융자한도 및 자금운용

·운영자금 : 농업인 30백만원, 법인·업체·공동사업장  50백만원

·시설자금 : 농업인 50백만원, 법인·업체·공동사업장 100백만원

- 융자이율 : 연리 1%

- 상환조건 : 운영자금(1년거치 3년 균분상환), 시설자금(2년거치 3년 균분상환)

□ 추진계획

❍ 사업추진

- 지원계획 수립 : 2017. 2월(상반기), 7월(하반기)

- 사업안내 및 홍보, 신청서 접수 : 2017. 2~3월(상반기), 7~8월(하반기)

- 융자지원신청자 추천, 타당성 검토 및 대상자 선정(심의회 개최) 등 :

2017. 3월(상반기), 8월(하반기)

- 선정대상자 통보 및 융자실시 : 2017. 3~6월(상반기), 8~11월(하반기)

- 융자실시 결과 통보 : 2017. 6월(상반기), 12월(하반기)

❍ 소특자금 체납액 징수 대책 수립

- 장기체납자 재산압류 및 대금 지급정지 등으로 납부독촉

1

6

축산물 생산성 향상 사업

축산담당 ☏ 5243

일반계속사업

❍ 3만불 시대에 맞는 축산업 맞춤지원으로 축산물 생산성 향상    ❍ 자원기반의 체계 구축으로 안정적인 축산소득 창출에 기여

□ 추진방향

❍ 사육환경개선과 체계적인 사육관리로 축산경쟁력 강화

❍ 효율적인 지원으로 생산비 절감을 통한 축산농가 소득증대

□ 추진계획

❍ (한우, 젖소산업 육성) 소 산업 육성을 위한 기반시설 및 인프라 구축

- 사업내용 : 한우, 젖소 수정난 이식비 지원 등 22종, 968백만원

❍ (양돈산업 육성) 양돈 소득기반 조성을 위한 사양관리 체계 개선

- 사업내용 : 고액분리기 설치지원사업 외 2종, 153백만원

❍ (기타가축 육성) 가금류, 양봉산업 등 신소득 작목 육성

- 사업내용 : 양봉산업육성지원사업 외 2종, 147백만원

1

7

조사료 생산기반 확충

축산담당 ☏ 5243

일반계속사업

❍ 조사료 생산용 기계․장비 및 사일리지 제조비 지원을 통하여           양질의 조사료 생산

❍ 조사료 생산의 증대로 농가 생산비 절감에 기여

□ 추진방향

❍ FTA 등 대외 경쟁력 확보를 위해 조사료 생산기반 확대

❍ 국산 조사료 생산․확대 재배로 사료비 및 생산비 절감

□ 추진계획

❍ (조사료 사일리지 제조비 지원) 조사료 재배확대 및 생산으로 조사료  생산기반 구축 : 250ha, 2,550톤, 180백만원

- 사업내용 : 동계․하계 사료작물 사일리지 제조비 지원

❍ (조사료 생산 재료․장비 지원) 양질 조사료 생산 및 재배확대 유도 : 종자 250ha, 사일리지 비닐 870롤, 조사료품질 관리 등 126백만원

- 사업내용 : 사료작물(춘파 ․ 추파용) 종자대 및 볏짚 등 부존자원 활용

❍ (대규모 조사료 생산단지 조성) 유휴 농지 활용 조사료 재배면적 확대 : 경영체 장비 활용으로 대규모 조사료 생산단지 조성

- 사업내용 : 사료작물 재배계약 및 구매계약 체결 추진

1

8

가축분뇨처리지원사업

축산담당 ☏ 5243

일반계속사업

❍ 가축분뇨처리 시설․장비 등 지원으로 가축분뇨의 자원화

❍ 적정처리를 통한 수질, 토양 등 환경오염 방지에 기여

□ 추진방향

❍ 가축분뇨처리 장비의 지원으로 가축분뇨를 퇴·액비로 자원화

❍ 가축분뇨의 전처리를 통한 악취저감 등 자연환경 오염예방

□ 추진계획

❍ (개별처리시설 등 분뇨처리지원사업) 가축분뇨의 퇴·액비로 자원화

- 사업내용 : 스키드로더, 퇴비사, 고압분무기, 액비저장조 등 29개소 179백만원

❍ (액비살포비지원사업) 분뇨를 자원화하여 순환농업 체제 구축

- 사업내용 : 450ha(250천원/ha) 액비살포비지원, 96백만원

❍ (가축분뇨 도비지원사업) 가축분뇨의 전처리를 통한 악취저감 및 오염예방

- 사업내용 : 원심분리기, 생균제, 톱밥 지원 127백만원

1

9

말산업 육성 지원

축산담당 ☏ 5243

일반계속사업

❍ 말산업 인프라 확충을 통해 농촌의 새로운 소득원 창출

❍ 생활승마 활성화로 도농교류의 촉진 도모

□ 추진방향

❍ 말산업을 FTA시대 대표 6차 산업으로 육성하여 일자리 창출, 농촌      경제 활성화

❍ 말산업 육성을 위한 인프라 구축․경쟁력 강화․교육 및 홍보 강화

□ 추진계획

❍ (학생승마활성화 지원) 승마산업 활성화 기여

- 사업내용 : 학생승마체험 2개소(함양승마클럽, 천령승마랜드) 학생승마                  체험비 지원, 63백만원

❍ (유소년 승마단 운영지원) 우수한 선수를 조기에 발굴하여 육성

- 사업내용 : 학생승마단 운영 1개소(위림초등학교), 승마용품·유니폼·                    안전장구 구입, 교육훈련·대회참가 비용 등, 60백만원

❍ (승마시설 지원) 승마시설 개보수를 통한 말산업 경쟁력 강화

- 사업내용 : 승마시설 개보수 1개소, 210백만원

1

10

구제역, AI 등 가축전염병 예방

가축위생담당 ☏ 5244

일반계속사업

❍『농장단위 차단방역』강화로 구제역, AI 등 가축전염병으로 인한

농가피해 사전 예방

❍ 공수의 및 공동방제단 운영으로 농가 현장방역 및 일제소독 강화

□ 추진방향

❍ 축산농가 가축전염병 예방(소독)약품 지원

❍ 공수의 동원 예찰, 예방접종 지원, 신속한 질병검진 등 현장방역 강화

❍ 축산공동방제단 운영으로 가축전염병 발생 사전 차단

□ 추진계획

❍ (가축전염병 예방) 축산농가 가축전염병 예방(소독) 약품 지원

- 사업내용 : 예방약품 2,285천 마리분, 소독약품 12.7톤 공급, 1,196백만원

❍ (방역활동 지원) 방역전문인력(공수의)을 통한 가축방역활동

- 사업내용 : 공수의 수당 및 시술비(45천 마리분), 340백만원

❍ (공동방제단 운영) 영세농(554호) 월 1회 이상 소독지원

- 사업내용 : 공동방제단 운영, 118백만원

1

11

쇠고기 이력제 및 축산물위생 관리

가축위생담당 ☏ 5244

일반계속사업

❍ 축산물 이력 네트워크를 이용한 안전 축산물 정보제공

❍ 무상급식을 통한 성장기 학생 건강유지 및 우유 소비기반 확대

□ 추진방향

❍ 축산물 이력 네트워크 『사육-도축-유통-판매』를 통한 안전축산물 정보제공

❍ 신속□정확한 업무처리와 사후 위생 점검으로 축산네트워크 형성

❍ 우유 섭취량 확대를 통한 성장기 학생 체력증진 및 소비 촉진으로 낙농가 소득 증진 기여

□ 추진계획

❍ (쇠고기 이력관리) 이력관리를 통한 쇠고기 정보 제공

- 사업내용 : 송아지 5,160두 귀표부착비, 48백만원

❍ (축산물 위생) 축산물 영업소 실태 및 위생 관리

- 사업내용 : 125개소(가공업 9, 포장처리업 8, 운반업 2, 판매업 106)

❍ (학교 우유급식) 저소득 가정학생 무상우유급식 및 축산물소비촉진

- 사업내용 : 초․중․고 학생 814명 280일 우유급식비, 98백만원

1

12

체류형 농업창원지원센터 건립

귀농귀촌담당 ☏ 5245

일반계속사업

❍ 안정적 도시민정착 유도 및 신규농업인 유입으로 농촌활력화 기여

❍ 귀농인의 실행단계에서 두려움 해소와 안정적 정착 기회제공

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016. ~ 2017.(2년간)

❍ 위  치   : 함양군 이은리 85번지 일원

❍ 사 업 비 : 8,000백만원(국비4,000, 지방비4,000)

❍ 사 업 량 : 체류형 농업창업지원센터 건립 1개소

❍ 사업내용

- 체류형 주택 조성 : 다세대주택 15동 30세대

- 세대별농장(텃밭) 조성 : 30개소

- 세미나실 1동, 농자재 보관소창고 1동, 퇴비사 1동

□ 추진성과 및 향후계획

❍ 2016. 1.  : 기본계획수립용역

❍ 2016. 3.  : 행정절차이행(환경, 재해, 부지조성 설계)

❍ 2017. 1.  : 토목공사 시행 (업체선정 입찰완료)

❍ 2017. 1.  : 건축실시 설계 승인요청(도 승인요청)

❍ 2017. 2.  : 건축사업 착공

❍ 2017. 12. : 공사완공 및 건축물 등재

❍ 2018. 1.  : 입주자 공모 및 입주

□ 기대효과

❍ 예비 귀농인의 조기에 안정적 정착을 도모하고 전문농업인 육성에 기여

❍ 농업의 젊은 후계인력 육성으로 생산성 확대와 경쟁력강화

1

13

도시민 농촌유치지원사업

귀농귀촌담당 ☏ 5245

일반계속사업

❍ 도시민 유치 지원센터 운영으로 One-Stop 귀농행정 추진
❍ 귀농창업 및 주거공간 마련 지원을 통한 안정적 정착 지원

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 260백만원 (국비 130  도비 39  군비 91)

❍ 사 업 량 : 귀농인 영농정착지원사업외 5종

❍ 사업내용

- 귀농인영농정착지원사업 : 50명

- 귀농인 지원센터 운영 : 1개소

- 귀농 홈스테이 및 코디네이터 운영 : 51개소

- 도시민 유치 박람회 및 귀농투어 : 10회

- 귀농인의 집 운영 : 1개소

- 귀농·귀촌 홍보물 제작 : 5종

□ 추진계획

❍ 2017.  1. : 사업계획 수립

❍ 2017.  2. : 사업대상자 선정

❍ 2017.  3. ~ 12. : 사업추진

❍ 2017. 12. : 사업완료 및 정산

□ 기대효과

❍ 도시민 유치의 효과적 달성으로 지역사회 자립기반 확립

❍ 귀농 귀촌인의 안정적 정착지원을 통한 이주 만족도 제고

❍ 도농간의 교류 활성화로 도농상생과 국토 균형발전에 기여