경 제 교 통 과

Ⅰ. 2018 업무추진 방향	167

Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 휴천 제2일반 산업단지 조성	171

□ 함양 분재원 조성	172

□ 장터 홍보단 운영	173

□ 경로당 태양광 보급사업	174

□ 한들 생태환경 및 주민편의시설 조성사업	175

2. 역점(특수)시책

□ 함양 에너지농장사업	176

3. 일반계속사업

□ 기업하기 좋은 농공단지 환경 조성	177

□ 공공일자리사업(공공근로·지역공동체)	178

□ 중소기업 및 소상공인 육성자금 지원	179

□ (예비)사회적기업 및 마을기업 확대 육성	180

□ 함양 인산죽염 항노화 지역특화농공단지 조성	181

□ 함양 항노화 산업단지 조기 조성	182

□ 일반산업단지 투자기업 유치	183

□ 지역 맞춤형 전통시장 육성	184

□ 청정연료 도시가스 조기 공급	185

□ 복지시설 LED조명 교체로 전력효율 개선	186

□ 신재생에너지 설비 설치로 군재정 개선	187

□ 교통안전시설물 설치 및 관리	188

□ 대중교통 운행 안정화 및 사각지대 해소	189

Ⅰ		2018 업무추진 방향

기업이 잘 돼야 함양이 산다

	전략목표
산업(농공)단지 활성화 일자리 창출 및 알선 전통시장 활성화 녹색성장 기반 조성 □ 교통안전시설물 인프라 구축 및 대중교통 활성화
	단위사업
일반산업단지 분양 및 투자유치 적극 추진 기업지원 강화 및 맞춤형 일자리 제공 물가안정 및 전통시장 활성화 신재생에너지 보급 확대 및 녹색성장 기반 조성 교통안전시설물 설치 및 관리 운수업체 재정지원 사업 및 대중교통 편의증진 사업

	Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1

1

휴천 제2일반 산업단지 조성

투자유치담당 ☏ 5182

신규사업

청정 함양을 브랜드화한 생수 생산을 위한 산업단지를 조성하여

지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여

□ 사업개요

□ 위    치 : 휴천면 목현리 785번지 일원

□ 면    적 : 216,000㎡(65천평)

□ 투자금액 : 300억원 정도

□ 투자기업 : 대한그룹(대구시 소재)

□ 투자기간 : 2017년 ~ 2019년(3년)

□ 개발방식 : 민간개발(실수요 100%)

□ 고용인원 : 130명 정도

□ 주요시설 : 생수생산시설, PET병 생산시설, 물류창고 등

□ 추진현황

□ 진로그룹 먹는 샘물 합작개발 함양군 제의 : 1995. 11. 25.

□ 샘물공장설립 승인 : 1997. 3. 10.

□ 먹는 샘물 제조업 허가(경남도) : 1997. 9. 3.

□ 진로 합자투자 포기로 구조물 철거 및 법원 강제집행 완료 : 2008. 2월

□ 샘물공장 투자유치 활동(기업방문 홍보 등) : 2017. 1월 ~

□ 투자협약 체결 : 2017. 6. 29.

□ 향후계획

□ 산업단지 계획(안) 수립 : 2017. 11월 ~ 2018. 2월

□ 산업단지 계획 승인 신청 : 2018. 3월

□ 산업단지 지정 고시 : 2018. 9월

□ 공사 착공 : 2018. 10월

□ 공사 준공 : 2019. 12월

1

2

함양 분재원 조성

투자유치담당 ☏ 5182

신규사업

❍ 용추계곡 내 분재를 테마로 하는 자연 친환경 휴양지 개발

❍ 국내 관광 레저의 거점 조성으로 관광활성화 도모

□ 사업개요

□ 위    치 : 함양군 안의면 하원리 1219번지 일원

□ 면    적 : 137,500㎡(41천평)

□ 투자금액 : 206억원

□ 투자기업 : KISS그룹(미국 뉴욕 본사)

□ 투자기간 : 2017년 ~ 2020년(4년)

□ 개발방식 : 민간개발

□ 주요시설 : 분재온실, 휴양시설, 방문자센터, 주차장 등

□ 추진현황

□ 민간 투자관련 업무 협의 : 2016. 6월

□ 사업 관련 상부기관 협의 : 2016. 9월 ~ 11월

(농림축산식품부, 대한무역투자진흥공사, 경남도 투자유치과 등)

□ 사업추진 법인(진조경 유한회사) 설립 : 2016. 12월

□ 사업대상지 검토 용역사 현장 확인 : 2017. 7월

□ 투자협약 체결(경상남도-KISS사-함양군) : 2017. 9. 27.

□ 향후계획

□ 확정 사업 계획서 작성 및 제출 : 2017. 12월

□ 사업계획서 관련부서 협의 : 2017. 12월

□ 외국인 투자지역 신청 및 승인 : 2018. 8월

□ 편입부지 매입 : 2018. 9월 ~

□ 공원구역 해제 : 2018. 10월

□ 사업착공 : 2019. 1월

□ 사업준공 : 2020. 12월

1

3

장터 홍보단 운영

상공에너지담당 ☏ 5183

신규사업

전통시장 고유의 흥(興)과 추억을 담은 장터 홍보단 운영으로 고객

참여 ‧ 친화형 시장으로 탈바꿈

□ 추진방향

❍ 고객 선호 창의적인 콘텐츠의 시장 융합

❍ 지속적인 피드백을 통한 고객 참여형 서비스 제공

□ 사업개요

❍ 대상시장 : 관내 전통시장 5개소

❍ 사업기간 : 2018년

❍ 사업위치 : 지리산함양시장 일원

❍ 사업내용 : 장터 홍보단(도우미) 운영

- 체험 행사 : 볼거리․먹거리․즐길거리 제공

(룰렛, 다트, 투호놀이, 달고나 체험, 농산물 직거래 시범 판매 등)

- 장터 홍보 동영상 제작, 유튜브 업로드 등 시장 홍보

- 시책 발굴 및 간접 행정 지원

❍ 예 산 액 : 5백만원

□ 추진계획

❍ 세부 운영계획 수립 : 2018. 1월

❍ 장터 홍보단 모집 : 2018. 2월

❍ 활동운영 계약 체결 : 2018. 3월

❍ 장터 홍보단 운영(시장별 장날운영) : 2018. 4월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 고객 친화형 시장 육성을 통한 전통시장 활성화 추진

❍ 선도적인 정책의 전개로 고객 트랜드에 맞춘 시장 활성화 도모

1

4

경로당 태양광 보급사업

상공에너지담당 ☏ 5183

신규사업

❍ 경로당 태양광 설비 보급으로 어르신들의 삶의 질 향상

❍ 취약시기 냉․난방 전기요금 부담 해소로 노인복지 구현

□ 사업개요

❍ 사업내용 : 경·노모당 태양광 발전설비 보급사업

사업대상			사업량 (㎾)	사업비(백만원)			비고
				계	국비	군비
합 계		82개소	181	532	266	266
경·노모당	2㎾ 태양광	73개소	146	532	266	266
	3㎾ 태양광	5개소	15
	5㎾ 태양광	4개소	20

❍ 읍면별 사업대상

(단위:개소)

합계	함양	마천	휴천	유림	수동	지곡	안의	서하	서상	백전	병곡	비고
82	19	5	2	3	8	15	6	5	8	6	5

□ 추진계획

❍ 사업 실시설계 : 2018년 1월 ~ 2월

❍ 관급자재 구매 및 계약 : 2018년 3월

❍ 착공 및 준공 : 2018년 4월 ~ 6월

□ 기대효과

❍ 폭염, 한파 등 취약시기 쉼터 제공을 겸한 경로당 이용 활성화 기대

❍ 온실가스 배출량 감축, 탈원전 및 기후변화 대응 등 정부정책 기여

1

5

한들 생태환경 및 주민편의시설 조성사업

교통행정담당 ☏ 5184

신규사업

❍ 현 공영주차장 도로환원으로 인한 교통혼란에 선제적 대응으로 주민 불편을 해소하고

❍ 소재지 중심지역에 자연친화적 사회기반시설 확충으로 지역경제

활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 634-5번지 일원

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3년)

❍ 사업내용 : 주차장, 주민편의시설, 소득창출공간 등(A=25,000㎡)

❍ 사 업 비 : 9,820백만원(국비 4,210, 도비 500, 군비 5,110)

□ 추진실적

❍ 기본계획수립 및 타당성조사 용역실시   : 2017.  2월

❍ 농림부 사전협의방문                   : 2017.  3월

❍ 종합추진상황 보고회(3회)               : 2017.  4월 ~ 7월

❍ 공유재산 관리계획 심의회 상정(가결)    : 2017.  9월

❍ 중기지방재정계획 반영                 : 2017. 11월

❍ 공유재산 관리계획안 군의회 재상정(가결)  : 2017. 11월

❍ 실시설계 및 군 관리계획 결정용역 실시  : 2017. 12월 ~ 2018. 5월

□ 추진계획

❍ 지방재정 투자사업 道 심사 서류제출         : 2018. 1월

❍ 국.도비 예산 확보                          : 2018. 3월 ~ 4월

❍ 부지매입비(추가분) 제1회 추경시 예산반영 건의     : 2018. 3월 ~ 5월

❍ 함양군 주차장조례 개정(실시설계용역 결과에 따라)  : 2018. 6월

❍ 감정평가 및 토지보상 실시                      : 2018. 7월 ~ 12월

❍ 사업 착공 및 완공                          : 2019. 1월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포 개최계획에 따른 주차공간 확보

❍ 고질적인 주차난 해소로 편리한 정주생활 인프라 구축

❍ 재래시장과 중심지 상권 교통혼잡 및 주차불편 개선

1

1

함양 에너지농장사업

상공에너지담당 ☏ 5183

역점 및 특수시책

❍ 정부“농촌태양광 보급사업”을 지역주민 참여형“함양에너지농장사업”으로 추진 군민소득 3만불 시대 목표 달성에 기여

❍ 신재생에너지 보급 확대를 통한 농가의 새로운 소득증대 기회 제공

□ 사업개요

❍ 사업장소 : 농업용 건축물 옥상 및 태양광시설 설치가 가능한 토지

❍ 사업내용 : 태양광 발전시설 설치 농가에 20년간 확정된 수익 보장

❍ 사업자격 : 설치장소 소재지 상 읍‧면 또는 연접 읍‧면에 주민등록이 1년이상 되어있는 농업인‧어업인‧축산인 또는 마을회

❍ 지원사항 : 정부 “농촌태양광 보급사업”정책자금 융자

- 5년거치 10년 분할상환, 설치비의 최대 90%, 이율 1.75%(변동금리)

□ 추진실적 및 계획

❍ 신청 및 접수 : 2017. 8. 21. ~ 9. 22.(농가→읍면→군)

- 개별 태양광 설치용량 300kW이하로 한정

❍ 현지조사 : 2017. 9. 25. ~ 10. 22.(군→농가)

- 입지기준, 설치여건 등 경제성검토 및 안내

❍ 사업계약 및 인‧허가 : 2017. 10. 23. ~ 12. 20.(농가→시공업체→군)

- 농가에서 개별 시공업체를 선정하여 사업을 위한 인‧허가 추진

❍ 금융지원 신청 : 2018. 1월 ~ 2월(시공업체→신재생에너지 센터)

- 신재생에너지 센터 심사결과 선정된 농가에 자금지원 추천서 발급

❍ 시공 및 전력판매 : 2018. 3월 ~ (시공업체→전력판매)

- 시공업체에서 시공완료 후 한국에너지공단 등에 전력판매 지원

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 조례에서 태양광 발전사업 입지(거리)제한

❍ 대  책 : 군 계획위원회 심의과정에서 개발행위허가 기준완화 적용

(주요도로 800m→100m, 주거지역‧관광지‧공공시설 500m→100m)

※ 향후 조례 개정을 통해 본 사업의 거리제한 기준의 명문화 필요

1

1

기업하기 좋은 농공단지 환경 조성

경제담당 ☏ 5181

일반계속사업

❍ 단지 내․외 민원 및 애로사항을 적극 발굴하고 신속하게 지원함으로써

❍ 입주 기업체의 만족도 및 생산성 제고

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2018년 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 318.8백만원

❍ 사업내용

- 신속한 행정서비스를 통한 농공단지 입주 및 활성화 지원

- 민원 및 애로사항 적극 발굴 및 해소

□ 추진계획

❍ 기업 만족도 향상을 위한 신속한 민원 처리

- 공장 관련 인․허가 등 관련 부서와 신속한 협의 처리

- 농공단지 입주업체 활성화 추진(18.8백만원)

· 중소기업 지원 시책 설명회, 기업 애로해소 현장기동반 운영 등

❍ 농공단지 기반시설 개선을 통한 입주 기업체 활성화 도모

- 소규모 기업환경 개선사업(200백만원)

· 안의제2전문농공단지 상수관로 설치공사 : D=90(75)mm, L=1,680m

- 단지 기반시설 관리 및 소규모 민원 해소 사업(100백만원)

□ 기대효과

❍ 입주업체 민원 및 애로사항 적극 해결로 기업 만족도 제고

❍ 농공단지 활성화로 인한 신규 일자리 창출 및 인구 늘리기 기여

1

2

공공일자리사업(공공근로·지역공동체)

경제담당 ☏ 5181

일반계속사업

❍ 저소득층·실업자 등에게 생계형 공공일자리 제공

❍ 전입자에게 공공일자리를 우선 제공하여 안정적인 정착과 인구늘리기 유도

□ 사업개요

❍ 대   상 : 재산 2억원 이하 저소득층 및 취약계층, 2년 이내의 전입자

❍ 유   형 : 2개 분야 (공공근로 및 정착일자리 사업 / 지역공동체일자리)

- 상·하반기 분기별 사업추진

- 참여자 모집 및 선발 : 11 ~ 12월(상반기) / 5 ~ 6월(하반기)

- 사업시행 : 2018. 1월 ∼ 12월(상·하반기 구분)

❍ 사업비 : 734백만원(전년대비 시급 16.4% 증)

□ 추진실적

❍ 공공근로사업 및 정착일자리사업

- 2017년 추진실적 : 선발자 120명, 집행액 525백만원

❍ 지역공동체일자리사업

- 2017년 추진실적 : 선발자 41명, 집행액 120백만원(국비50%, 도비15%)

□ 추진계획

❍ 사업 및 참여자 모집 홍보 : 2017. 11월 ~ 2018. 10월

※ 언론기관, 홈페이지, 이장회의, 현수막 등을 통한 적극적인 홍보

❍ 참여자 신청 및 접수

- 상반기 : 2017. 11월 ~ 12월

- 하반기 : 2018. 5월 ~  6월

❍ 사업시행

- 상반기 : 2018. 1월 ~ 6월

- 하반기 : 2018. 7월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 공공일자리 사업 제공을 통한 저소득층의 안정적인 삶 도모

❍ 전입자의 일자리 제공으로 안정적인 정착과 인구늘리기 기여

1

3

중소기업 및 소상공인 육성자금 지원

경제담당 ☏ 5181

일반계속사업

❍ 중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전 지원으로 경기침체에 따른 자금난 해소와 경영 안정을 도모하고

❍ 지역경제 활성화는 물론 일자리 창출과 기업 경쟁력 강화에 기여

□ 추진방향

❍ 중소기업 및 소상공인 경영안정을 위한 자금지원

❍ 경제 활성화를 위해 상반기 60% 조기 집행

□ 사업개요

❍ 함양군 중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전 지원

- 지원규모 : 연100억원(상반기 60억원, 하반기 40억원)

- 사 업 비 : 700백만원(이차보전 연2.5%)

- 지원한도 : 중소기업 3억원, 소상공인 5천만원 이하

- 지원기간 : 4년(2년 거치 2년 균분상환, 1년 거치 3년 균분상환)

- 지원방법 : 금융기관에서 중소기업 및 소상공인에게 융자한 융자금 이자의 일부를 보전

※ 금융기관 : NH농협은행 함양군지부, ㈜경남은행 함양지점

□ 추진계획

❍ 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자 지원

- 융자계획 공고 및 접수 : 2018. 1. 3. ~ 2. 2. / 2018. 6. 4. ~ 7. 3.

- 융자배정 : 접수 종료 후 15일 이내 대상자 확정

- 융자실행 : 대상자 확정 후 2개월간

❍ 분기별 이차보전금 지급

□ 기대효과

❍ 자금난 해소를 통한 경쟁력 강화 및 지역경제 회복 지원

1

4

(예비)사회적기업 및 마을기업 확대 육성

경제담당 ☏ 5181

일반계속사업

❍ 지역 내 자원을 활용한 (예비)사회적기업 및 마을기업 육성

❍ 기업의 자립기반 강화와 지역공동체 일자리창출로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. 1월 ~ 12월

❍ 사 업 량

- 예비사회적기업 : 7개소 ⇒ 9개소

- 마을기업 : 7개소 ⇒ 8개소

❍ 사 업 비 : 227백만원(국비151, 도비24, 군비52)

□ 추진방향

❍ 민간주도의 (예비)사회적기업 육성을 통한 취약계층 일자리 창출

❍ 기업 설립을 통한 안정적 소득 증대 및 지역경제 활성화에 기여

□ 추진계획

❍ 지역실정에 맞는 지속가능한 모델 발굴

- 신규지정 3개소(예비사회적기업 2, 마을기업 1)

❍ 사업비 집행 및 사후관리와 현장지도

- 사회적기업 : 일자리창출사업, 사업개발비 지원사업 등

- 마을기업 : 마을기업 육성사업

- 기업육성 및 부실방지를 위한 현장지도 : 분기별 1회

❍ (예비)사회적기업 제품 우선구매 추진 : 총 구매액의 6%이상

□ 기대효과

❍ 마을단위 지역공동체 일자리창출과 농가소득 제고 기여

1

5

함양 인산죽염 항노화 지역특화농공단지 조성

투자유치담당 ☏ 5182

일반계속사업

❍ 산업, 문화, 건강과 휴식공간, 체험홍보관 건립 등 6차 산업화 기반 마련

❍ 함양 항노화산업의 성장 동력으로 육성, 지역의 안정적인 일자리 창출과 주민소득 향상 도모

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2016. 1월 ~ 2019. 12월(4년간)

❍ 위    치 : 함양군 함양읍 죽림리 산 319번지 일원

❍ 규    모 : 206,820㎡

❍ 시 행 사 : ㈜인산가

❍ 사 업 비 : 265억원

❍ 유치업종 : 식료품 제조, 가공 및 정제염 제조, 창고 및 운송관련 서비스업

□ 추진사항

❍ 투자협약 체결[도-함양군-(주)인산가]	: 2015. 11. 30.
❍ 2017년 산업단지 지정계획 승인[국토부]	: 2016. 12. 29.
❍ 환경영향평가 본안 및 승인신청서 제출[도]	: 2017. 3. 14.
❍ 경남도 지방산단계획심의위원회 심의 승인	: 2017. 5. 25.
❍ 지역특화농공단지 승인 고시	: 2017. 7. 21.
❍ 손실보상 측량 및 토지 조서 및 물건 조서 작성	: 2017. 9. ~ 12.

□ 향후계획

❍ 특화농공단지 감정평가 및 보상액 산정, 협의	: 2018. 1월 ~
❍ 공사 착공	: 2018. 10월
❍ 공사 준공	: 2019. 12월

□ 기대효과

❍ 인지도가 높은 ㈜인산가에서 휴양체험을 할 수 있는 단지조성

❍ 웰빙관광 명소 육성 및 안정적인 일자리 확보로 경제 활성화 도모

1

6

함양 항노화 산업단지 조기 조성

투자유치담당 ☏ 5182

일반계속사업

경남 미래 50년 전략사업인 항노화 산업을 선도하기 위해 항노화

우수기업을 유치, 단지 조성을 조기에 추진 완료

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2010. 1월 ~ 2020. 12월

❍ 위    치 : 함양읍 신관리, 백천리 일원

❍ 규    모 : 740,586㎡

❍ 사 업 비 : 560억원(부지 및 지장물 매입)

❍ 유치업종 : 항노화 기능성 식품, 친환경 바이오 제조업 등

□ 추진사항

총 계		기보상		미보상		비고
면적(㎡)	금액(백만원)	면적(㎡)	금액(백만원)	면적(㎡)	금액(백만원)
740,586	10,600	691,061	9,600	49,525	1,000

❍ 부지 및 분묘 보상 : 195필지 691,061㎡(93.2%), 709기 중 586기(82.6%)

❍ 예정부지의 「개발행위허가 제한 지역」지정 고시 : 2012. 11. 12.

❍ 항노화 산업단지 진입도로 개설공사 완료 : 2016. 12. 7.

❍ 항노화 특화 바이오 단지 조성 기업 유치 진행 중 : 2017. 7월 ~

- A=296,110㎡, 사업비 500억원(잔여부지 444,476㎡)

□ 향후계획

❍ 1차 투자유치지역 투자기업 유치 마무리

❍ 부지 및 지장물(분묘) 보상 지속추진(토지26필지, 분묘123기 등) : 연중

❍ 잔여부지(2차 투자유치지역)에 능동적 투자유치 활동 전개 : 연중

- 홍보물 제작, 각종 투자유치설명회 참가 및 관련 기관 방문 홍보

□ 기대효과

❍ 신규 일자리 및 안정적인 경제소득 확보로 인구 유입 기대

1

7

일반산업단지 투자기업 유치

투자유치담당 ☏ 5182

일반계속사업

지역경제 활성화 및 일자리 창출 위한 일반산업단지 활성화를 위해

투자기업 유치에 행정력을 집중코자 함

□ 단지현황

구 분	함양일반산업단지	휴천일반산업단지
위 치	수동면 우명·원평리 일원	휴천면 목현리 일원
면 적	738,360㎡	83,513㎡
시행사	㈜한국화이바	함양제강(주)
유치업종	자동차 및 트레일러제조업 외 5개 업종	제강업, 금속가공제품 제조업
준공일	2017. 2. 23.	2009. 12. 29.

□ 추진사항

□ 함양일반산업단지

- 단지 준공 : 2017. 2. 23.

- 투자유치 기업 방문 홍보 : 2017. 3월 ~

- 투자촉진지구 지정(입주기업 인센티브 제공) : 2017. 5월

□ 휴천일반산업단지

- 투자유치 방문 기업 홍보물 발송(109개 업체) : 2017. 2. 8.

- 투자유치 기업 방문(25개 업체) : 2017. 2월 ~ 8월

□ 향후계획

❍ 함양일반산업단지 : 미분양 용지 기업유치 지속 추진(분양률62.8%)

❍ 휴천일반산업단지 : 투자희망 기업체 발굴 및 투자 유도

□ 기대효과

❍ 신규 일자리 및 안정적인 경제소득 확보로 인구 유입 기대

1

8

지역 맞춤형 전통시장 육성

상공에너지담당 ☏ 5183

일반계속사업

창의적인 콘텐츠의 시장융합을 통한 특성화된 지역 맞춤형 전통시장

육성으로 지리산함양시장 경쟁력 강화 및 지역발전 도모

□ 문화관광형시장 육성사업

❍ 사 업 비 : 1,580백만원 이내(국비 50%, 군비 50%)

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년(3년)

❍ 사업주관 : 지리산함양시장 문화관광형시장 육성사업단

❍ 사업내용 : 디자인&ICT융합사업 외 3개 분야사업

❍ 추진계획

- 사업계획 수립 및 사업추진협의회 개최 : 2018. 3월

- 사업 추진 : 2018. 4월 ~ 12월

□ 특화 전통시장 육성사업

❍ 사 업 비 : 900백만원(도비 40%, 군비 60%)

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3년)

❍ 사업내용 : 산삼·산약초 주제 특화 전통시장 육성

❍ 추진계획

- 상인 간담회 개최 및 세부사업 홍보 : 2018. 2월

- 사업 추진 :2018. 3월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 지역상권의 안정적인 소득과 시장 활성화 도모

❍ 창의적인 콘텐츠의 시장융합으로 시장 브랜드가치 제고 및 경쟁력 강화

1

9

청정연료 도시가스 조기 공급

상공에너지담당 ☏ 5183

일반계속사업

❍ 도시가스 조기 공급으로 수혜 불균형 해소 및 군민 삶의 질 향상

❍ 도시가스 공급회사의 체계적인 관리를 통한 안전사고 예방

□ 추진방향

❍ 도시가스사와 유기적 협조를 통한 민원 해소 및 조기공급

❍ 단독주택 밀집 등 취약지역 보조금지원 공급사업 추진

□ 사업개요

❍ 도시가스 공급시설 설치(투자기업 부담사업)

- 투자기간 : 2009년 ~ 2018년(10년간)

- 투자금액 : 8,122백만원

- 투자시설 : 배관망 매설(27.6km) 및 기타 기계설비

- 투자기업 : ㈜지에스이 도시가스

❍ 보조금지원 공급사업(단독주택 등 취약지역)

- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)

- 보조금액 : 2,190백만원[보조 1,488(68%), 도시가스사 702(32%)]

- 사 업 량 : 8.9km(870세대 공급)

❍ 공급실적 : 한주아파트 등 3,850여 세대(2017년 10월말 기준)

□ 추진계획

❍ 도시가스사 공급사업 : 2018. 1월 ~ 12월

- 사업구간 : 필봉산길~동위천길(1,376m) 및 현대아파트~동일철재(852m) 일원

- 사 업 량 : 2,228m(300여 세대)

- 사 업 비 : 690백만원(도시가스사 자체투자)

❍ 보조금지원 공급사업 : 2018. 1월 ~ 10월

- 사업구간 : 상림길 ~ 함양초등길(상림공원) 일원(180여 세대)

- 사 업 량 : 1,598m(180여 세대)

- 사 업 비 : 495백만원(보조 372백만원, 도시가스사 123백만원)

□ 기대효과

❍ 도시형 에너지 보급으로 안정된 생활 향상 도모

1

10

복지시설 LED조명 교체로 전력효율 개선

상공에너지담당 ☏ 5183

일반계속사업

❍ 조명시설 전력소비효율 향상으로 에너지 절감 및 생활환경 개선

❍ 사회복지시설 운영경비 절감에 따른 수용주민 복지 향상 유도

□ 사업개요

❍ 사업내용 : 사회복지시설 LED조명 교체

사업대상		사업량 (조명수량)	사업비(백만원)			비고
			계	국비	군비
합 계		632개 (11~50W)	100	70	30
복지 시설	장애인 주간보호센터	77	19	13	6
	지리산 실버타운	297	43	30	13
	해맑은 요양원	258	38	27	11

□ 추진계획

❍ 사업 실시설계 : 2018년 1월 ~ 2월

❍ 관급자재 구매 및 계약 : 2018년 3월

❍ 착공 및 준공 : 2018년 4월 ~ 6월

□ 기대효과

❍ 온실가스 배출량 감축, 탈원전 및 기후변화 대응 등 정부정책 기여

❍ 소비효율 개선을 통한 전력소비 절감으로 에너지절약정책 부응

1

11

신재생에너지 설비 설치로 군재정 개선

상공에너지담당 ☏ 5183

일반계속사업

❍ 신재생에너지 보급 확대로 주민의식 개선 및 정부정책에 부응

❍ 신재생에너지를 통한 전력소비 감축으로 군재정 기여

□ 사업개요

❍ 사업내용 : 신재생에너지(태양광 발전) 설비 설치

사업대상		설치용량 (㎾)	사업비(백만원)			비고
			계	국비	군비
합 계		65	187	93.5	93.5
공공 시설	면사무소(서하, 백전)	15	43	21.5	21.5
	함양군 대봉산체험관	30	86	43	43
	선비문화탐방관	15	43	21.5	21.5
	추성산촌생태마을 산촌휴양관	5	15	7.5	7.5

□ 추진계획

❍ 2018년도 지역지원사업 신청 : 2017년 11월

❍ 사업 실시설계 : 2018년 6월 ~ 7월

❍ 관급자재 : 2018년 8월

❍ 공사기간 : 2018년 8월 ~ 10월

□ 기대효과

❍ 온실가스 배출량 감축, 탈원전 및 기후변화 대응 등 정부정책 기여

❍ 신재생에너지설비 보급 확대를 통한 친환경시설 주민의식 제고

1

12

교통안전시설물 설치 및 관리

교통행정담당 ☏ 5184

일반계속사업

❍ 각종 교통안전시설물 유지관리 및 정비로 교통사고 사전예방 강화

❍ 보행자, 운전자, 대주민 등에 대한 교통부문 생활불편 해소

□ 추진방향

❍ 각종 시설물에 대한 전수조사 후 유지관리 및 정비 원칙

❍ 주민건의사항 및 경찰서 교통안전시설물 심의회 통과사업 우선 시행

❍ 버스승강장 신설/교체 시 모델통일로 함양군 상징성 강조

□ 추진계획

❍ (버스승강장 신설/교체 정비) 관광함양 이미지 제고 및 이용주민들에 대한 편리성 제공

- 사 업 량 : 신설(10동), 도색 및 보수(60개소)

- 사 업 비 : 130백만원

❍ (각종 교통안전시설물 설치 및 관리) 보행자, 운전자, 대주민 등의 안전을 고려한 교통안전시설물 인프라 구축 및 유지보수 관리

- 사 업 비 : 260백만원

- 사업내용 : 반사경 설치(40개소), 무인과속단속장비 설치(2개소), 경보등 및 경광등 교체사업(7개소), 버스정류장 등 교통관련 표지판 정비사업(50개소), 교통신호기 유지보수(1식), 무인단속카메라 이설사업(2개소), 보행자자동인식신호기설치사업(1식)

□ 기대효과

❍ 교통안전 확보와 관광함양 이미지 제고

1

132

대중교통 운행 안정화 및 사각지대 해소

교통행정담당 ☏ 5184

일반계속사업

❍ 운수업체 운영손실 재정지원으로 경영과 대중교통 운행 안정화

❍ 콜택시, 브라보 행복택시 운행 확대로 교통복지 증진과 대중교통 사각지대 해소

□ 추진계획

❍ (운수업체 재정지원) 고유가, 자가용 차량증가, 승객감소 등으로 운수업체 적자운영에 따른 운영손실 재정지원

- 사 업 비 : 3,054백만원

- 지원대상 : 운수업체 차량 315대(버스49, 택시112, 화물자동차154)

- 사업내용 : 벽지노선 손실보상금(51개 노선), 버스업체 재정지원(2개업체), 유가보조금 지원(315대), 택시감차사업(2대), 농어촌버스 단일요금제 손실보상금(51개 노선), 전세버스 무선인터넷 통신료 지원사업(20대)

❍ (운수업체 시설 및 장비지원) 운수업계 재정난 완화로 경영안정과 대중교통서비스 질 향상 도모

- 사 업 비 : 364백만원

- 사업내용 : 전세버스 외부광고 홍보비(20대), 전세버스 홍보물 제작(7대), 시외버스 외벽 홍보비(10대), 택시 외부광고 제작(30대), 택시 외부광고 홍보비(112대), 공영버스 구입(1대), 첨단안전장치 장착지원 사업(32대), 택시업계 블랙박스 교체사업(112대)

❍ (대중교통 편의증진사업) 교통약자의 이동편의증진 도모와 대중교통 사각지대 지역민들에 대한 교통복지혜택 제공

- 사 업 비 : 273백만원

- 사업내용 : 교통약자 특별교통수단 콜택시 운영(4대), 브라보 행복택시 운행(9개면 26개마을)

□ 기대효과

❍ 운수업체 경영난 해소와 대중교통 운행 안정화로 대민서비스 질 향상

❍ 대중교통 사각지대 해소로 지역주민과 택시업계간 상생발전 도모