건 설 교 통 과

Ⅰ. 2019 업무추진 방향	209

Ⅱ. 2019 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 덕전천 정비사업	213

□ 병곡면소재지 농촌중심지활성화 사업	214

□ 안의면 기초생활 거점육성사업	215

2. 역점(특수)시책

□ 한들 생태환경 주차장 조성사업	216

□ 대중교통 운행 안정화 및 사각지대 해소	217

□ 국도24호선 이은농공단지 단구간 확장사업	218

□ 지리산 가는길(오도재) 터널 개설사업	219

3. 일반계속사업

□ 주민숙원사업 시행	220

□ 군도 확·포장사업	221

□ 농어촌도로 확·포장사업	222

□ 이은~난평간 도로 확·포장공사	223

□ 함양위천 생태하천 조성사업	224

□ 소하천 정비사업	225

□ 기초생활인프라 구축사업	226

□ 일반농산어촌 개발사업	227

□ 재해위험 저수지 정비사업	229

농업생산기반시설 정비사업(도비보조)	230

재해위험 저수지 정비사업(균특)	231

교통안전시설물 설치 및 관리	272

Ⅰ		2019 업무추진 방향

미래가 있는 균형발전 건설사업 시행

	전략목표
주민숙원사업 시행으로 지역주민 편익증대 도로망 확충으로 지역 균형개발 자연친화적 하천관리 농업기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상 교통안전시설물 인프라 구축 및 대중교통 활성화
	단위사업
주민숙원사업 시행 군도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 자연친화적 하천관리사업 일반농산어촌 개발사업 재해위험 저수지 정비사업 교통안전시설물 설치 및 관리 ⑧ 운수업체 재정지원 사업 및 대중교통 편의증진 사업

	Ⅱ. 2019 주요업무 계획

❍ 하천 미개수로 인한 홍수 피해가 빈번하고, 난개발로 인한 종합적

하천정비 사업 필요

❍ 지리산의 고유한 역사, 문화공간과 연계한 친수공간 조성으로 과거,

현재, 미래가 공존하며 정감어린 아름다운 하천 조성

1

1

덕전천 정비사업

하천담당 ☏ 5183

신규사업

개    요

❍ 위    치 : 마천면 가흥리 ~ 삼정리 일원

❍ 사 업 량 : 지방하천정비 L=6.0km

- 제방 및 호안 L=2.08km, 교량 재가설 3개소, 다목적저류지 1개소

❍ 사 업 비 : 38,502백만원(국비50%, 도비15%, 군비35%)

- 국비 19,251, 도비 5,775, 군비 13,476

❍ 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2023. 7월(5년간)

❍ 사업비 투자계획

(단위:km/백만원)

합 계		기시행		2019년		장래
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
하천정비 L=6.0km	38,502	실시설계 및 조사측량	800	실시설계 및 조사측량 하천기본계획변경 1식	500	보상 1식 하천정비 L=6.0km	37,202

추진계획

❍ 조사측량 및 실시설계 : 2018. 7월 ~ 2020. 6월

❍ 하천기본계획 변경    : 2019. 6월

❍ 행정절차 이행        : 2020. 5월

❍ 토지보상             : 2020. 6월

기대효과

❍ 재해로부터 안전한 하천환경 조성으로 인명 및 재산 피해 예방

❍ 다양한 친수공간 조성으로 지리산과 연계한 관광자원 확보

1

2

병곡면소재지 농촌중심지활성화사업

농촌개발담당 ☏ 5184

신규사업

❍ 농촌중심지마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

개    요

❍ 사업구분 : 균형발전특별회계

❍ 위    치 : 병곡면 송평리 일원

❍ 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2021년 12월

❍ 사 업 량 : 게이트볼장, 건강문화활력센터, 힐링건강공원 등

❍ 사 업 비 : 5,950백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	연도별 사업비				비 고
	계	2018년까지	2019년	2020년이후
합 계	5,950	390	1,727	3,833
병곡면소재지 농촌중심지 활성화사업	5,950	390	1,727	3,833

추진계획

❍ 기본 및 시행계획 도협의	: 2019. 1월

❍ 기본 및 시행계획 승인	: 2019. 3월

❍ 하드웨어 사업 시행	: 2019. 3월

❍ 하드웨어 사업 준공	: 2021. 12월

기대효과

❍ 농촌중심지마을의 생활환경정비로 면소재지 거점기능 강화

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전 기여

1

3

안의면 기초생활 거점육성사업

농촌개발담당 ☏ 5184

신규사업

❍ 안의면 거점지역 시설정비 및 체계적인 관리로 지역활성화 도모

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

개    요

❍ 사업구분 : 균형발전특별회계

❍ 위    치 : 안의면 금천리, 당본리, 석천리, 이전리 일원

❍ 사업기간 : 2019년~ 2022년(4개년)

❍ 사 업 량 : 연암체육관 리모델링, 안전보행로 조성, 행복나눔센터 조성 등

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	연도별 사업비				비 고
	계	2018년까지	2019년	2020년이후
합 계	4,000		377	3,623
안의면 기초생활 거점육성사업	4,000		377	3,623

추진계획

❍ 실시설계용역 시행	: 2019. 1월

❍ 기본 및 시행계획 승인                            : 2019. 10월

❍ 하드웨어 사업 시행	: 2020. 3월

❍ 하드웨어 사업 준공	: 2022. 12월

기대효과

❍ 농촌중심지마을의 생활환경정비로 면소재지 거점기능 강화

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전 기여

1

1

한들 생태환경 주차장 조성사업

선진교통담당 ☏ 5185

역점 및 특수시책

❍ 현 공영주차장의 도로 환원으로 인한 교통 혼란에 선제적 대응으로 주민 불편 해소

❍ 소재지 상업지역에 자연친화적 사회기반시설 확충으로 지역경제 활성화 도모

개    요

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 634-5번지 일원

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년

❍ 사업내용 : 주차장, 편의시설 등(A=29,587㎡)

❍ 사 업 비 : 10,210백만원[국비 2,355, 군비 2,355 / (자체)군비 5,500]

추진실적

❍ 기본계획수립 및 타당성조사 용역실시  : 2017.  2월

❍ 실시설계 및 군 관리계획 결정용역 실시 : 2017. 12월 ~ 2019. 2월

❍ 道 지방재정 투자심사 심의 통과       : 2018.  3월

❍ 편입용지 등 보상(60%)                 : 2018.  6월 ~ 12월

추진계획

❍ 편입용지(3차) 보상 : 2019. 5월

❍ 사업 착공 및 완공 : 2019. 6월 ~ 2020. 6월

기대효과

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포 개최에 따른 주차공간 확보

❍ 고질적인 주차난 해소로 편리한 인프라 구축

❍ 함양시장과 중심지 상권 교통 혼잡 및 주차 불편 개선

1

2

대중교통 운행 안정화 및 사각지대 해소

선진교통담당 ☏ 5185

역점 및 특수시책

❍ 운수업체 운영손실 재정지원으로 경영과 대중교통 운행 안정화

❍ 브라보 행복택시, 특별교통수단 확대 운행을 통한 대중교통 사각지대 해소

❍ 농어촌버스 단일요금제 시행으로 교통복지 실현

사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ∼ 12월

❍ 지원대상 : 관내 운수업체(버스 50, 택시 110, 화물 122, 전세버스 20)

❍ 사 업 비 : 3,778백만원

❍ 사업내용 : 벽지노선 손실보상 지원사업 외 11개 사업

추진계획

구분	사업명	사업량	사업비(백만원)			비고
			계	국도비	군비
계			4,000	510.8	3,489.2
재정지원	벽지노선 손실보상금 지원	51개 노선	791	98	693
	버스업체 재정지원	2개 업체	650	325	325
	유가보조금 지원	316대	1,300	-	1,300
	농어촌버스 단일요금 손실보상 지원	51개 노선	538	-	538
	택시감차사업 지원	3대	96	7.8	88.2
시설 및 장비지원	전세버스 외부광고 홍보비	20대	36	-	36
	전세버스 홍보물 제작	7대	7	-	7
	시외버스 외벽 홍보비	10대	18	-	18
	택시 외부광고 제작	30대	9	-	9
	택시 외부광고 홍보비	110대	264	-	264
편의증진	교통약자특별교통수단(콜택시) 운영	4대	140	-	140
	브라보 행복택시 운행	29개 마을	151	80	71

추진계획

❍ 버스 손실보상금 및 재정지원금, 특별교통수단     : 매분기 집행

❍ 유가보조금, 브라보 행복택시 운행비용 지원       : 매월 집행

❍ 운수업체 시설 및 장비지원(차량 외벽 홍보비 포함)  : 상반기 집행

1

3

국도24호선 이은농공단지 단구간 확장사업

도로담당 ☏ 5182

역점 및 특수시책

❍ 우리군의 관광객 증가에 따른 교통량 증가로 주변 도로와의
병목현상이 발생되어 도로확장으로 교통 불편 해소

개    요

❍ 위    치 : 함양읍 이은리(인당교 ~ 이은농공단지 진입로)

❍ 사업기간 : 2016. 12월 ~ 2020. 12월

❍ 사 업 량 : 도로 확포장 L=0.44km, B=35m(4차로)

❍ 사 업 비 : 4,460백만원(국비 73%, 군비 27%)

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비				진도 (%)	비고
			계	기시행	2019년	장래
국도24호선 이은농공단지 단구간 확장사업	함양읍 이은리	도로확포장 L=0.44km B=35m	4,460	539	1,100	2,821	미착공	계속 (보상)

추진계획

❍ 국도 병목지점 개량 대상지 결정 : 2016. 10월

❍ 실시설계 완료 : 2016. 12 ~ 2017. 3월

❍ 도로구역 변경결정 및 보상협의 : 2018. 11월

❍ 공사착공 : 2019. 1월

문제점 및 대책

❍ 실시설계 및 감정평가 결과 사업비(2,988백만원) 부족

- 국토교통부 총사업비 협의로 부족사업비 건의 반영

기대효과

❍ 주민과 관광객의 통행편익을 제공하고 원활한 물류수송으로 지역
경제 활성화에 기여

1

4

지리산 가는길(오도재) 터널 개설사업

도로담당 ☏ 5182

역점 및 특수시책

❍ 함양~마천 간 터널 개설로 관광자원의 시너지 효과 기대

❍ 겨울철 결빙에 따른 도로이용 불편해소 및 지역주민과 관광객에게       연중 안전한 도로환경 제공

개    요

❍ 위    치 : 함양군 휴천면 월평리 ~ 마천면 구양리 일원

❍ 사 업 량 : ┏ 터널개설 L=2.0km, B=10.0m

┗ 접속도로 L=2.1km, B=12.0m(교량 1개소 L=40m)

❍ 사 업 비 : 35,200백만원(도비100%)

❍ 도로현황

노선명	연장(km)			정비율
	계	정비완료	미정비
화개~함양 (지방도1023호)	26.5	20.0	6.5	75.5%

추진계획

❍ 지리산 가는길 정비사업 건의 : 2017. 8월

❍ 경상남도 도로건설관리계획(2016 ~ 2020) 반영 고시 : 2018. 1월

문제점 및 대책

❍ 경상남도 투자우선순위 분석 결과 사업경제성(B/C=0.8)이 낮아  2020년 이후 사업대상지로 반영(※ 우선순위 45위)

- 우리나라의 대표적 랜드마크인 지리산 관광 활성화와 ‘2020 함양
산삼 항노화 엑스포’와 연계하여 우선 시행될 수 있도록 경상남도에
지속 건의

기대효과

❍ 주민과 관광객에게 안전한 도로환경을 제공하고 지역균형발전 및
관광자원의 시너지효과 증대 도모

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 시행으로 편익제공

❍ 생활주변 불량 시설물 정비로 안전사고 사전 예방

❍ 새마을 농로 편입부지에 대한 민원예방과 행정력 손실 방지

1

1

주민숙원사업 시행

건설행정담당 ☏ 5181

일반계속사업

□ 사업개요

❍ 주민숙원 및 소규모 주민숙원사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 292개소(주민 참여 및 숙원사업 : 232, 소규모 주민숙원사업 : 60)

- 사 업 비 : 10,778백만원

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사업대상 : 새마을사업 농로 편입부지 이전등기

- 사 업 비 : 90백만원

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 추진계획

❍ 주민숙원사업

- 편입토지 희사승락서 사전 징구 : 2018. 10월 ~ 2019. 2월

- 기본조사 및 실시설계 : 2019. 1월 ~ 2월

- 사업시행 : 2019. 3월 ~ 11월

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 분할 및 등기대상 필지 조사 : 2019. 2월

- 협의 취득 및 이전등기 : 2019. 2월 ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 주민숙원사업 요구 대비 예산 부족한 실정으로, 주민숙원 해소를 위한 충분한 예산 지원 필요

□ 기대효과

❍ 생활기반시설 확충으로 주민 편익제공을 통한 삶의 질 향상

❍ 차량 및 보행자의 안전을 위협하는 안전불량 시설정비로 각종 민원해소와 안전사고 사전예방

❍ 민원발생으로 인한 행정력 손실 방지 및 군민의 재산권 보호

❍ 중장기 계획에 따라 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로

주민 편익 증대

1

2

군도 확․포장사업

도로담당 ☏ 5182

일반계속사업

개    요

❍ 노선수 및 사업량 : 24개 노선, L=203.5km

❍ 사업비 : 224,293백만원(군비 100%)

(단위:km/백만원)

노선수	전체		기시행		2019년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
24	203.5	224,293	114.8	85,571	5.1	2,280	83.6	136,642

\

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비(백만원)				진도 (%)	비고
			계	기시행	2019년	장래
계	4개소	L=5.1km	11,363	790	2,280	8,293
거평~남효(군도 7호) (2공구, 대실~조광정)	지곡 창평	L=1.0km	1,900	550	1,000	350	미착공	계속
거평~남효(군도 7호) (3공구, 조광정~남효)	지곡 창평	L=1.6km	2,455		155	2,300	미착공	신규
송계~노상(군도21호)	서하 송계	L=1.3km	3,125		825	2,300	미착공	계속
중남~복동(군도23호)	서상 금당	L=1.2km	3,883	240	300	3,343	미착공	신규

추진계획

❍ 군도 7호(2구간 대실 ~ 조광정/3구간 조광정 ~ 남효)

- 2구간(도로구역 결정 및 보상협의 : 2018. 5월 ~ / 사업착공 : 2019. 1월)

- 3구간(행정절차 이행 : 2019. 1월 ~ / 구역결정 및 보상협의 : 2019. 10월)

❍ 군도 21호(송계 ~ 노상)

- 행정절차 이행 : 2019. 1월 ~

- 도로구역 결정 및 보상협의 : 2019. 10월

❍ 군도 23호(중남 ~ 복동)

- 환경영향 평가 반영 보완설계 : 2018. 9월 ~

- 도로구역 결정 및 보상협의 : 2019. 1월

기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

❍ 농어촌도로의 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로 주민 편익 증대

1

3

농어촌도로 확․포장사업

도로담당 ☏ 5182

일반계속사업

개    요

❍ 노선수 및 사업량 : 284개 노선, L=667.5km

❍ 사업비 : 680,631백만원                           (단위:km/백만원)

노선수	전 체		기시행		2019년		장 래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
284	667.5	680,631	363.37	248,709	12.1	4,500	292.03	427,422

추진계획                                 (단위:km/백만원)

사업명	위 치	사업량	사 업 비				진도 (%)	비고
			계	기시행	2019년	장래
계	11개소	L=12.1m	20,573	3,713	4,500	12,360	20,573
촉동선	마천 구양	L=0.5km	1,523	1,323	200	0	80%	공사마무리
도마선	병곡 도천	L=1.1km	1,980	1,280	700	0	50%	계속
미금선	휴천 대천	L=1.8km	2,300	190	700	1,410	미착공	보상, 공사
대안선	백전 대안	L=0.8km	2,000	350	500	1,150	미착공	보상, 공사
옥동선	유림 옥매	L=1.4km	3,000	100	300	2,600	미착공	보상
운평선	백전 평정	L=1.3km	1,800	150	500	1,150	미착공	보상, 공사
삼산선	함양 백연	L=1.7km	2,000	80	300	1,620	미착공	보상
숙공선	안의 초동	L=0.6km	700	60	100	540	미착공	보상
신촌선	백전 백운	L=0.8km	1,570	100	300	1,170	미착공	보상
덕연선	병곡 연덕	L=1.2km	1,900	80	300	1,520	미착공	보상
실도선	마천 군자	L=0.9km	1,800	0	600	1,200	미착공	설계,보상

❍ 2019. 1월 ~ 5월 : 보상협의 및 사업시행

❍ 2019. 1월 ~ 12월 : 사업시행 및 추진

❍ 2019. 12월 : 사업완료

기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역 균형개발 및 군민 생활편익 증진

1

4

이은~난평간 도로 확·포장공사

도로담당 ☏ 5182

일반계속사업

❍ 지방도 연장으로 도로를 이용하는 군민의 교통편익 제공 및

지역 접근성 제고

개    요

❍ 위    치 : 함양읍 이은리 남산 ~ 난평리 신기

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2021년

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.1km, B=9.5m, 교량 L=46m

❍ 사 업 비 : 18,000백만원(도비 85%, 군비 15%)(도비재배정사업)

- 도비 : 15,300백만원, 군비 2,700백만원

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비				진도 (%)	비고
			계	기시행	2019년	장래
이은~난평간 도로 확·포장공사	이은리 남산 ~난평리 신기	도로확포장 L=2.1km B=9.5m 교량L=46m	18,000	4,200	5,000	8,800	보상 진행 중	계속

추진계획

❍ 실시설계 완료 : 2015. 6월 ~ 12월

❍ 지방노 노선변경 고시 : 2017. 5월

❍ 보상협의 및 행정절차 이행 : 2017. 8월 ~

❍ 도로구역 결정 : 2018. 11월

❍ 공사 착공 : 2019. 1월

기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 제고 기여

❍ 아름다운 자연형 생태하천 복원과 재해로부터 군민의 재산 보호

❍ 치수, 친수, 생태복원 및 역사와 문화가 흐르는 하천조성

1

5

함양위천 생태하천 조성사업

하천담당 ☏ 5183

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 ~ 대덕리 일원

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=3.4km

- 축제 및 보축 L=5.7km, 교량재가설 2개소, 가동보 1개소

❍ 사 업 비 : 38,754백만원(국비53%, 도비10%, 군비 37%)

- 국비20,390, 도비 4,078, 군비 14,286

❍ 사업기간 : 2010. 12. 17. ~ 2019. 12. 31.

(단위:km/백만원)

합 계		기시행		2019년		장래
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
하천정비 L=3.4km	38,754	하천정비 L=3.4km 교량 1개소 (두루침교)	33,309	교량 1개소 (돌북교)	5,445

추진현황 및 계획

❍ 사업착공                          : 2010. 12월

❍ 총사업비 변경(158억→309억)         : 2012. 11월

❍ 두루침교 재가설 준공              : 2017.  8월

❍ 총사업비 변경(309억→387억)         : 2018.  2월

❍ 돌북교 재가설 착공                : 2019.  1월

❍ 사업준공                          : 2019. 12월

기대효과

❍ 재해로부터 안전한 하천환경 조성으로 인명 및 재산 피해 예방

❍ 수해피해 우려 및 발생 지구의 하천정비로 피해예방과 하천환경 개선

❍ 친환경적 하천 조성으로 생태계 보전과 지역주민 생활편의 제공

1

6

소하천 정비사업

하천담당 ☏ 5183

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 함양읍 외 4개면

❍ 사 업 량 : 소하천정비 L=7.76km

❍ 사 업 비 : 22,943백만원(국비50%, 군비50%)

❍ 사업기간 : 2015. 7월 ~ 2021. 12월

❍ 사업비 투자계획

(단위:km/백만원)

소하천명	합 계		기시행		2019년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	L=7.76km	22,943	L=2.01km	9,170	L=1.72km	7,376	L=4.03km	6,397
관동	L=1.51km	4,710	L=0.91km	2,890	L=0.6km	1,820
미동	L=0.82km	7,006	L=0.5km	3,808	L=0.32km	3,198
남산	L=1.66km	3,777	L=0.6km	1,060	L=0.4km	1,226	L=0.66km	1,491
학골	L=1.33km	3,686	실시설계 및 보상	1,092	L=0.4km	732	L=0.93km	1,862
보각	L=2.44km	3,764	실시설계	320	보상	400	L=2.44km	3,044

추진계획

❍ 사업착공 및 보상협의 : 2019. 1월

❍ 사업준공             : 2019. 12월

기대효과

❍ 재해로부터 사전 피해를 예방하고 친수공간 조성으로 주거 환경

개선에 기여

❍ 기계화 경작로 확장을 통해 농기계 이동 등 불편 해소

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

1

7

기초생활인프라 구축사업

농촌개발담당 ☏ 5184

일반계속사업

사업개요

❍ 사업구분 : 국비보조사업(계속)

❍ 위    치 : 함양읍 신관리, 안의면 하원리, 서하면 송계리, 백전면 대안리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월

❍ 사 업 량 : 기계화경작로 L=15km, 양수장 1개소

❍ 사 업 비 : 2,573백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2018년까지	2019년	2020년이후
합 계	5,571	3,000	2,571	-
기계화경작로	2,714	1,000	1,714	-	백천,상백지구
소규모용수개발	2,857	2,000	857	-	국계지구

추진계획

❍ 기계화경작로 및 소규모용수개발사업 실시설계	: 2019. 1월

❍ 기계화경작로 및 소규모용수개발사업 착공	: 2019. 3월

❍ 기계화경작로 사업 준공	: 2019. 6월

❍ 소규모용수개발 사업 준공	: 2019. 6월

기대효과

❍ 농기계의 농경지 진입이 원활하여 노동시간 절감 및 소득 창출

❍ 안전적 용수공급으로 영농환경개선 및 주민 소득기반 확충

❍ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

1

8

일반농산어촌 개발사업

농촌개발담당 ☏ 5184

일반계속사업

사업개요

❍ 권역단위 종합개발사업

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2018년 까지	2019년	2020년 이후
합 계	1권역		3,715	2,635	1,080
남덕유산	서상면 상남리	2016 ~ 2019년	3,715	2,635	1,080

❍ 창조적마을만들기사업

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2018년 까지	2019년	2020년 이후
합 계	9권역		4,500	692	2,161	1,647
거평	지곡면 창평리	2018~ 2019년	500	143	357
지곡	유림면 손곡리	2018~ 2019년	500	143	357
한남	휴천면 남호리	2018~ 2019년	500	143	357
내동	안의면 하원리	2018~ 2019년	500	120	380
대로	서상면 대남리	2018~ 2019년	500	143	357
삼천	함양읍 신천리	2019~ 2020년	500	-	100	400	2019년 신규사업
금반	휴천면 금반리	2019~ 2020년	500	-	68	432	2019년 신규사업
국계	유림면 국계리	2019~ 2020년	500	-	100	400	2019년 신규사업
도천	병곡면 도천리	2019~ 2020년	500	-	85	415	2019년 신규사업

❍ 농촌중심지활성화사업(일반지구)

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2018년 까지	2019년	2020년 이후
합 계	1권역		4,507	3,742	765
서하면	서하면 송계리	2016~ 2019년	4,507	3,742	765

❍ 농촌다움복원사업

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2018년까지	2019년	2020년이후
합 계	1권역		2,000	-	300	1,700
도마 다랭이논	마천면 군자리	2019~ 2021년	2,000	-	300	1,700	2019년 신규사업

❍ 취약지역생활여건 개조사업

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2018년까지	2019년	2020년이후
합 계	2권역		2,492	486	1,498	508
월평	휴천면 월평리	2017~ 2020년	1,613	486	1,127	-
부야	지곡면 공배리	2019~ 2021년	879		371	508	2019년 신규사업

추진계획

❍ 마을만들기사업(삼천 외 3지구) 기본 및 시행계획수립	: 2019. 1월

❍ 취약지역생활여건개조사업(부야) 기본계획 수립	: 2019. 1월

❍ 남덕유산권역 창조적마을만들기 사업 준공          : 2019. 12월

❍ 창조적마을만들기사업(거평,한남,지곡,대로,내동) 준공   : 2019. 12월

기대효과

❍ 농촌마을의 생활환경정비와 주민 소득기반 확충 및 면소재지

거점기능 강화

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전 기여

❍ 저수지 붕괴 등으로 인한 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

1

9

재해위험 저수지 정비사업

농촌개발담당 ☏ 5184

일반계속사업

사업개요

❍ 사업구분 : 국비보조사업(계속)

❍ 위    치 : 휴천면 호산리, 안의면 대대리, 지곡면 보산리 일원

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2021년(6년간)

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 정비사업 1식

❍ 사 업 비 : 1,532백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				진도 (%)	비 고
	계	2018년까지	2019년	2020년이후
합 계	6,624	2,590	1,532	2,502
도장골	2,172	1,240	532	400	60	휴천면 호산리
대대웃못	2,952	1,290	600	1,062	20	안의면 대대리
정취	1,500	60	400	1,040	5	지곡면 보산리

추진계획

❍ 대대웃못재해위험저수지 정비사업(2차분) 시행	: 2019. 1월

❍ 정취재해위험저수지 정비사업 사업 시행	: 2019. 1월

❍ 도장골재해위험저수지 정비사업(3차분) 시행	: 2019. 1월

❍ 도장골재해위험저수지 정비사업(2차분) 준공	: 2019. 12월

기대효과

❍ 재해위험저수지 정비로 군민의 재산 및 인명피해 예방

❍ 안전적 용수공급으로 영농환경개선 및 주민 소득기반 확충

❍ 논두렁 만들기 및 제초작업에 소요되는 노동력 절감

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

1

10

농업생산기반시설 정비사업(도비보조)

농촌개발담당 ☏ 5184

일반계속사업

사업개요

❍ 사업구분 : 도비보조사업(계속)

❍ 위    치 : 휴천면 목현리, 안의면 신안리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월

❍ 사 업 량 : 논두렁설치 L=4.5km, 용배수로정비 L=2km

❍ 사 업 비 : 400백만원(도비 30%, 군비 70%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	연도별 사업비				비 고
	계	2018년까지	2019년	2020년이후
합 계	2,910	2,110	400	400
동촌지구	1,310	1,110	100	100	준영구적논두렁
목현지구	1,600	1,000	300	300	용배수로정비

추진계획

❍ 실시설계 시행	: 2019. 1월

❍ 준영구적 논두렁 자재구입	: 2019. 2월

❍ 목현지구 용배수로정비사업 시행	: 2019. 3월

❍ 목현지구 용배수로 정비사업 준공	: 2019. 5월

❍ 준영구적 논두렁사업 완료	: 2019. 5월

기대효과

❍ 준영구적 논두렁 설치로 농가소득 증대와 유지관리 노동력 절감

❍ 노후된 용배수로 정비로 영농환경 개선

❍ 저수지 붕괴 등으로 인한 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

1

11

재해위험 저수지 정비사업(균특)

농촌개발담당 ☏ 5184

일반계속사업

사업개요

❍ 사업구분 : 국비보조사업(계속)

❍ 위    치 : 함양읍 신관리, 안의면 하원리, 서하면 송계리, 백전면 대안리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 정비사업 1식

❍ 사 업 비 : 750백만원(국비 80%, 도비 6%, 군비 14%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2018년까지	2019년	2020년이후
합 계	2,380	630	750	1,000
재해위험 저수지 (균특)	2,380	630	750	1,000	거기, 신당, 하비저수지, 대안음지들용배수로

추진계획

❍ 실시설계 시행	: 2019. 1월

❍ 거기, 신당, 하비 재해위험저수지 정비사업 시행	: 2019. 3월

❍ 거기, 신당, 하비 재해위험저수지 정비사업 준공	: 2019. 5월

기대효과

❍ 재해위험저수지 정비로 군민의 재산 및 인명피해 예방

❍ 안전적 용수공급으로 영농환경개선 및 주민 소득기반 확충

1

12

교통안전시설물 설치 및 관리

선진교통담당 ☏ 5185

일반계속사업

❍ 각종 교통안전시설물 유지관리 및 정비로 교통사고 사전예방 강화

❍ 보행자, 운전자, 대주민 등에 대한 교통부문 생활불편 해소

사업개요

❍ 각종 시설물 전수조사 후 유지관리 및 정비계획 수립

❍ 주민건의사항 및 경찰서 교통안전시설물 심의회 통과사업 우선 시행

❍ 교통안전시설물 인프라 구축 및 유지보수 관리

추진계획

❍ 버스승강장 신설/교체 정비 : 버스 이용객들의 쾌적한 공간 확보 및 편리성 제공

- 사 업 비 : 80백만원

- 사 업 량 : 신설(5동), 도색 및 보수(60개소)

❍ 각종 교통안전시설물 설치 및 관리 : 보행자, 운전자 등의 안전을 고려한 교통안전시설물 인프라 구축 및 유지 보수 관리

- 사 업 비 : 275백만원

- 사 업 량 : 반사경 설치(50개소), 무인과속단속장비 설치(2개소), 경보등 및 경광등 교체(7개소), 교통안전표지판 정비사업(50개소), 교통신호기 유지보수(1식), 무인단속카메라 설치(2개소)

기대효과

❍ 각종 교통안전시설물 유지관리 및 정비로 교통사고 예방 강화

❍ 교통부문 생활불편 해소 및 관광 함양 이미지 제고