상 하 수 도 사 업 소

Ⅰ. 기본현황	523

Ⅱ. 2022 상반기 주요성과	527

Ⅲ. 2022 업무추진 방향	529

Ⅳ. 2022 주요업무 계획

□ 광역마을상수도(유림지구) 설치사업	531

□ 소규모수도 노후화시설 개량사업	532

□ 스마트 관망관리 인프라구축사업	533

□ 수동하교지구 농어촌생활용수 개발사업	534

□ 백전지구 농어촌생활용수 개발사업	535

□ 지곡 덕암지구 농어촌생활용수 개발사업	536

□ 노후 상수관로 정밀조사 용역	537

□ 누수탐사 및 지방상수도 관망도작성 용역	538

□ 수동지구 농어촌생활용수 개발사업	539

신천지구 하수관로 설치사업	540

안의면 공공하수처리시설 확충(증설)사업	541

대포․손곡지구 면단위공공하수처리시설 설치사업	542

농월정지구 하수도시설 설치공사	543

휴천 문상지구 농어촌마을하수도 정비사업	544

하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영	545

공공하수시설 운영 및 정비사업	546

함양군 정수장 운영 관리	547

Ⅰ		기본현황

정․현원

구 분	계	상하수도 사업소장	관리 담당	상수도 담 당	하수도 담 당	정수장 담 당	비 고
정 원	19	1	5	5	4	4	▫취ㆍ정수장 -계 : 15명 -청경: 3명 -공무:12명
현 원	18	1	5	5	4	3

기   능

구 분	분 장 사 무
관리담당	❍ 일반회계, 상하수도 특별회계 예산편성 및 집행 ❍ 일반서무, 공유재산 관리 ❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 정비사업 ❍ 광역마을상수도 사업 시행 ❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 조례 관리 ❍ 지하수 개발 및 관리
상수도담당	❍ 상수도 기본 및 정비계획 수립 시행 ❍ 상수도 현대화 구축사업 ❍ 상수도 급수구역 확대, 급수공사 ❍ 상하수도 사용료 부과 징수 ❍ 상하수도 검침, 체납관리 ❍ 노후관 개량, 계량기 교체, 누수방지 사업 ❍ 상수도 관련 조례 관리 ❍ 상수도 민원 처리
하수도담당	❍ 하수도정비기본계획 수립 및 시행 ❍ 하수도시설 확충사업 및 유지관리 ❍ BTL사업 운영 관리 ❍ 하수처리장 설치, 운영 관리 ❍ 하수도 관련 조례 관리 ❍ 배수시설 설치신고 및 관리
정수장담당	❍ 먹는 물 및 상수원수 수질관리 ❍ 취ㆍ정수장 설치 및 운영관리 ❍ 수돗물수질평가위원회 운영관리 ❍ 저수조 및 상수원보호구역 관리 ❍ 약수터, 먹는물 공동시설 관리

지방상수도 현황

정수장	시설 년도	시설용량 (톤/일)	계획급수인구	현재급수인구	급수 전수	급수구역	근무 인력
계		14,700	30,565	25,796	9,359
함양	1980 (2010)	9,000	22,997	18,847	5,985	함양읍(12개리, 41개 마을) 운림리, 용평리, 대덕리, 교산리, 신천리, 신관리, 백천리, 백연리, 이은리, 난평리, 삼산리, 죽곡리 수동면(3개리, 8개 마을) 화산리, 우명리, 원평리 지곡면(8개 리, 20개 마을) 개평리, 평촌리, 마산리 시목리, 창평리, 도촌리, 공배리, 보산리	공무원 3 청경 2 공무 5
안의	1985 (2005)	2,000	-	-	-	-	공무 1
서상	2015	3,700	7,568	6,949	3,374	서상·서하·안의면 일원 (3개 면, 75개 마을)	공무 6

※ 보급률(64%), 유수율(70%), 생산원가(2,466원), 판매단가(701원), 현실화율(28%)

상수원보호구역 현황

보호구역명	지정일자 (변경일자)	지정면적 (㎢)	위치	수원	취수능력 (㎡/일)	비고
계	2개소	0.41㎢	-	-	11,000
함양상수도	1982. 1. 21.	0.28㎢	취수장 ~ 덕평교 하부 하천구역	위천	9,000
안의상수도	1986. 5. 9. (2005. 3. 3.)	0.13㎢	취수장~마음마을 하부 하천구역	지우천	2,000

약수터 현황

시 설 명	위 치	비 고
상림 약수터	함양읍 운림리 49
백운산 약수터	백전면 백운리 산 91-14

지하수 현황	(단위 : 공)

읍‧면 구 분	관리공수	허 가	신 고	비 고
합 계	9,218	68	9,150
함 양	1,154	10	1,144
마 천	358	4	354
휴 천	521	10	511
유 림	497	5	492
수 동	1,685	4	1,681
지 곡	2,163	3	2,160
안 의	1,204	4	1,200
서 하	501	8	493
서 상	454	10	444
백 전	400	9	391
병 곡	281	1	280

마을상수도 및 소규모급수시설 현황

구분 읍면	시설수 (개소)	마을상수도			소규모급수시설			비 고
		소계	지하수	표류수	소계	지하수	표류수
합 계	210	1	-	1	209	192	17
함양	16	-	-	-	16	16	-
마천	31	1	-	1	30	19	11	계곡수(11), 하천수(1)
휴천	31	-	-	-	31	31	-
유림	23	-	-	-	23	23	-
수동	19	-	-	-	19	19	-
지곡	12	-	-	-	12	12	-
안의	22	-	-	-	22	18	4	계곡수(3), 용천수(1)
서하	13	-	-	-	13	12	1	계곡수(1)
서상	8	-	-	-	8	7	1	계곡수(1)
백전	24	-	-	-	24	24	-
병곡	11	-	-	-	11	11	-

※ 마을상수도 : 급수인구 100명 이상 2,500명 미만, 급수량 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만

소규모급수시설 : 급수인구 100명 미만 또는 급수량 20㎥/일 미만

하수처리시설 현황

마을현황	하수처리		향후계획		계획유보마을
	시설수	마을수	시설수	마을수
264	54개소	140	4개소	34	90

※ 계획유보마을 : 하수처리인구수가 적고 가구가 산재되어 있어 현재 함양군 하수도기본계획에
미반영(2025년 이후 하수도기본계획 변경 시 반영여부 결정)

- 500톤/일 이상

시 설 명	위 치	시설용량 (㎥/일)	설계유입수질 BOD(ppm)	처리구역 (마을)
계	3개소/45개마을	11,300		45
함양하수처리시설	함양읍 용평리 27	9,600	184	26
수동하수처리시설	수동면 화산리 1162-5	800	158	8
안의하수처리시설	안의면 이전리 312	900	185	11

- 500톤/일 미만

시설수 (마을수)	시설용량 (㎥/일)	읍면	시설수	처리마을
51개소 (94개 마을)	3,951	함양읍	8개소	신기, 대병, 척지, 본백·중촌, 관동, 죽곡, 뇌산, 구만·조동·원구
		마천면	6개소	강청·실덕·도촌·뇌전, 가흥이주단지, 의평·의중·금계, 창원, 당흥, 추성
		휴천면	4개소	한남, 원기, 동호, 목현·금반
		유림면	3개소	장항, 서주이주단지, 우동·화촌
		수동면	4개소	분덕, 분덕이주단지, 도북, 효리·가성·남계
		지곡면	6개소	시목, 공배, 정취, 문화·개평·상개평·창촌, 전원마을(보산), 덕암·오평
		안의면	3개소	용추·하비·내동·마음·사평·유동·상비, 농월정, 동촌·안심
		서하면	3개소	은행, 오현, 송계·신기
		서상면	7개소	방지, 추상·추하, 옥산, 복동, 육십령, 조산·신기·식송, 칠형정·도천·피적래·오산·맹동·대로
		백전면	2개소	상대평·하대평·하백현·양천·음천, 평촌·동백·서백
		병곡면	5개소	토내·덕평·송평·가촌·휴촌·신기, 원산, 연서, 마평, 도천·월암

위원회 현황

위원회명	설치근거	기능(역할)	회의 개최 (회)	비고
함양군 수돗물 수질평가위원회	･수도법 제3조 ･함양군 수돗물 수질 평가위원회 운영 조례	･수돗물 정기 수질검사 및 공표 ･수질관리 및 수도시설 운영자문 ･수질검사 대상과 지점의 선정	2	2021년기준

Ⅱ		2022 상반기 주요성과

안정적인 수돗물 공급을 위한 기반조성 및 유지관리

❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 개량 및 정비 : 67건, 1,535백만원

- 소규모급수시설 노후화시설 개량사업(백운) : 266백만원

- 지방상수도 전환마을 시설개량사업(화산지구) : 128백만원

- 마을상수도·소규모급수시설 기반조성 및 유지관리 : 1,141백만원

❍ 농어촌생활용수 개발사업 시행 : 8건 / 35,235백만원

- 병곡지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=28.2㎞) : 9,953백만원

- 지곡지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=37.9㎞) : 9,641백만원

- 수동지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=18.3㎞) : 4,412백만원

- 백전지구 농어촌생활용수 개발사업(관로매설 L=11.6㎞) : 9,442백만원

- 수동하교(도북)지구 농어촌생활용수 개발사업(관로매설 L=0.7㎞) : 133백만원

- 지방상수도 급수구역 확장사업(성북황대, 노상, 장자벌) : 1,654백만원

❍ 지방상수도 관로 개량 사업 시행 : 6건 / 4,477백만원

- 스마트관망관리 인프라구축사업(실시간 수질·수량 측정 및 긴급상황대비 시스템 구축 1식 / 수자원공사위탁 시행) : 3,148백만원

- 노후 상수관로 정밀조사용역(상수관로 정밀조사 1식) : 183백만원

- 누수탐사 및 지방상수도 관망도작성 용역(누수탐사 L=113.6㎞, 관망도 작성 L=84.25㎞) : 952백만원

- 내동마을 지방상수도 유수율제고사업 외 1건(관로개량 L=2.5㎞) : 513백만원

- 지방상수도 누수복구 등 긴급 정비 1식 : 194백만원

안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급 추진

❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 : 209개소, 105백만원

❍ 지방상수도 원·정수 수질검사 : 39백만원

❍ 상반기 함양ㆍ서상 정수시설 청소 : 30백만원

❍ 취ㆍ정수장 CCTV 신설 및 보수 : 8개소, 60백만원

❍ 상수도시설물 정기안전점검 용역 : 2개소, 10백만원

❍ 상수도 유량계 교정검사 용역 : 23개소, 11백만원.

❍ 정수장 통합관리시스템 유지관리 용역 : 59개소, 20백만원

- 취정수장 : 4개소, 가압장 : 38개소, 배수지 : 17개소

깨끗한 수질관리를 위한 하수처리시설 구역 확대 및 유지관리

❍ 하수처리구역 확장사업 : 33,788백만원

- 신천지구 하수관로 설치사업(관로매설 L=5.7㎞, 배수설비 193) : 5,432백만원

- 안의면 공공하수처리시설 확충(증설)사업(관로매설 L=8.5㎞, 처리시설 100㎥/일) : 12,579백만원

- 대포손곡지구 면단위 공공하수처리시설 설치사업(관로매설 L=8.8㎞, 처리시설 80㎥/일) : 9,595백만원

- 농월정 하수도시설 설치사업(관로매설 L=7.563㎞) : 3,211백만원

- 성북황대 하수도시설 설치사업(관로매설 L=2.8㎞) : 1,836백만원

- 안의 상비마을 배수설비 설치사업(관로매설 L=0.65㎞) : 535백만원

- 함양 삼휴마을 하수처리구역 확장공사(관로매설 L=0.9㎞) : 600백만원

❍ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영 관리 : 60,092백만원

❍ 노후 공공하수처리시설 유지관리 및 보수 : 300백만원

공공하수처리 시설 운영 및 관리

❍ 공공하수도 시설 운영 및 유지관리 : 3,992백만원

❍ 소규모처리장(수동 외 10개소) 기술진단 : 224백만원

❍ 공공하수처리시설 통합관리시스템 유지보수 : 400백만원

Ⅲ		2022 업무추진 방향

항노화의 중심, 함양 물 복지 실현

	전략목표
맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성
	단위사업
마을상수도 통합관리 시스템 구축으로 생활용수의 안정적 공급 지방상수도 급수구역 확대로 안정적인 맑은 물 공급 지방상수도 현대화사업 추진 하수처리시설 확대 추진 하수관로 정비 BTL사업 운영·관리

❍ 유림지구의 노후된 소규모 수도시설을 통합, 광역마을상수도설치

❍ 맑고 깨끗한 생활용수의 안정적 공급으로 군민 삶의 질 향상

1

1

광역마을상수도(유림지구) 설치사업

관리담당 ☏ 6610

사업개요

❍ 위    치 : 유림면, 휴천면(13개마을)

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년(6년간)

❍ 사 업 량 : 정수시설 470㎥/일, 취수시설 500㎥/일, 배수시설 V=300㎥
송수관로 L=3.55Km, 배수관로 L=19.52km, 급수관로 L=12.09km

❍  사 업 비 : 10,956백만원                             (단위 : 백만원)

구 분	합 계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	비고
합 계	10,956	272	857	2,143	1,857	1,878	3,949
균특전환 (70%)	7,669	-	600	1,500	1,300	1,300	2,969
군 비 (30%)	3,287	272	257	643	557	578	980

❍ 급수지역

- 유림면 : 지곡, 손곡, 서주, 우동, 화촌, 장항, 회동, 유평, 옥산, 화암, 창촌, 판문

- 휴천면 : 동호

추진실적 및 계획

❍ 실시설계 용역완료 : 2016. 12월

❍ Ⅰ단계사업 착공 및 준공 : 2017. 5월 ~ 2020. 12월

❍ 총사업비 변경승인(환경부) : 2018. 1월

❍ 함양군관리계획 결정 및 지형도면 승인고시 : 2019. 2월

❍ Ⅱ단계사업 착공 및 준공 : 2020. 6월 ~ 2022. 10월

기대효과

❍ 노후된 소규모 수도시설을 통합하여 광역마을상수도 통합관리 시스템을 구축하여 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로서 군민 삶의 질 향상

❍ 관로 노후로 인한 누수증가 및 수질문제 등 양질의 물 공급 어려움 발생

❍ 비정상적인 관망도가 많이 매설되어 있어 관리가 어려운 실정

1

2

소규모수도 노후화시설 개량사업

관리담당 ☏ 6610

개    요

❍ 사업기간 : 2011. 1월 ~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 함양군 일원(11개 읍·면)

❍ 사 업 비 : 13,722백만원(전환 70%, 군비 30%)

❍ 사 업 량 : 노후관로 교체 L=149.3km

※ 9개마을 : 문상, 대포, 미천, 산두, 시목, 의평, 강청, 상죽, 도촌

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	노후관로 교체 L=149.3km	13,722	노후관로 교체 L=120.2km	11,007	노후관로 교체 L=29.1km	2,715	-	-
전환		9,574		7,674		1,900		-
도비		-		-		-		-
군비		4,148		3,333		815		-

추진상황 및 계획

❍ 실시설계 및 계약심사, 도로굴착심의 등 행정절차 : 2022. 1월 ~ 5월

❍ 소규모수도 노후화시설 개량 사업착공 및 준공 : 2022. 6월 ~ 12월

기대효과

❍ 노후관로 교체로 인한 맑은 물을 안정적으로 공급하여 지역주민의 삶의 질 향상 및 소규모수도시설 유지관리 비용 절감 기대

1

3

스마트 관망관리 인프라구축사업

상수도담당 ☏ 6620

❍ 수돗물 공급 전 과정에 ICT감시체계를 구축하여 사고발생을 사전에 방지하고 사고 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 인프라 구축

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 12월(2년간)

❍ 위    치 : 함양군 지방상수도 공급지 일원

❍ 사 업 비 : 4,098백만원

- 국비사업 : 3,148백만원(국비 70%, 군비 30%)

- 자체사업 : 950백만원

❍ 사 업 량

- 국비사업 : 실시간 수질ㆍ수량 측정 및 긴급상황 대비 시스템 구축

- 자체사업 : 스마트 관망관리 사무실 신설 1식

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	스마트 관망관리 인프라 구축 1식 사무실 신설 1식	4,098	-	-	스마트 관망관리 인프라 구축 1식 사무실 신설 1식	3,487	사무실 신설 1식	611
환특		2,204		-		2,204		-
도비		-		-		-		-
군비		1,894		-		1,283		611

추진계획

❍ 인프라 구축사업 착수 및 완료         : 2022. 1월 ~ 12월

❍ 센터건립 실시설계                    : 2022. 2월 ~ 7월

❍ 센터건립 사업 착수 및 완료           : 2022. 8월 ~ 2023. 12월

기대효과

❍ 수질·수량을 실시간 감시하고 제어함으로써 수돗물 사고를 사전에 방지하고 사고발생 시 신속한 위기대응 및 재발방지 가능

❍ 스마트 관망관리센터를 건립하여 상수도공급 전과정 효율적 관리

1

4

수동하교지구 농어촌생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 6620

❍ 수질악화(라돈, 불소 등)와 수량부족으로 생활불편을 겪고 있는 수동면 하교리 일원에 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 지역 주민 건강과 삶의 질 개선

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 10월 ~ 2024. 10월(2년간)

❍ 위    치 : 함양군 수동면 하교리~내백리 일원

❍ 사 업 비 : 3,757백만원(전환 70% 도비 15%, 군비 15%)

❍ 사 업 량 : 관로 L=15.3km, 배수지 1개소, 가압장 4개소

❍ 급수구역 : 3개 마을(318가구, 536명)(내백, 도북, 하교)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=15.3km 배수지 1개소 가압장 4개소	3,757	-	-	관로 L=8km 배수지 1개소	1,878	관로 L=7.3km 가압장 4개소	1,879
균특		2,630		-		1,315		1,315
도비		563		-		281		282
군비		564		-		282		282

추진상황 및 실적

❍ 수도정비기본계획 변경 및 실시설계   : 2022. 3월 ~ 9월

❍ 행정절차 이행                       : 2022. 9월 ~ 10월

❍ 공사 착공 및 준공                   : 2022. 10월 ~ 2024. 10월

기대효과

❍ 수질악화 지역에 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 군민에게 안정된 물 공급으로 생활환경 개선 및 지역균형 발전도모

1

5

백전지구 농어촌생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 6620

❍ 수질악화(라돈, 우라늄 등)와 수량부족으로 생활불편을 겪고 있는 마을상수도 사용 지역에 지방상수도를 공급하여 주민생활불편 해소 및 보건위생 향상

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2025. 6월(3년간)

❍ 위    치 : 함양군 백전면, 서하면 일원

❍ 사 업 비 : 9,442백만원(전환 70%, 도비 15%, 군비 15%)

❍ 사 업 량 : 관로 L=11.6km, 가압장 10개소

❍ 급수구역 : 13개 마을(679가구, 1136명)(평정, 상백현, 평촌, 서백, 동백, 운산, 상신, 대방, 신촌, 해평, 은행, 운곡, 옥환)

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022 계획		2023		2024 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=29.7km 가압장 8개소	9,442	관로 L=8.9km	2,836	관로 L=10.4km 가압장 4개소	3,303	관로 L=10.4km 가압장 4개소	3,303
균특		6,610		1,984		2,313		2,313
도비		1,416		426		495		495
군비		1,416		426		495		495

추진계획

❍ 행정절차 이행                        : 2022. 5월 ~ 6월

❍ 공사 착공 및 준공                    : 2022. 6월 ~ 2025. 6월

기대효과

❍ 수질악화 지역에 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 군민에게 안정된 물 공급으로 생활환경 개선 및 지역균형 발전도모

1

6

지곡덕암지구 농어촌생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 6620

❍ 수질악화(불소, 우라늄 등)와 수량부족으로 생활불편을 겪고 있는 마을상수도 사용 지역에 지방상수도를 공급하여 주민생활불편 해소 및 보건위생 향상

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 8월 ~ 2024. 8월(2년간)

❍ 위    치 : 함양군 지곡면 덕암리 일원

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(전환 70%, 도비 15%, 군비 15%)

❍ 사 업 량 : 관로 L=4.2km, 가압장 1개소

❍ 급수구역 : 1개 마을(49가구, 78명)(주암)

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022 계획		2023		2024 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=4.2km 가압장 1개소	1,000	관로 L=3.0km	500	관로 L=1.2km 가압장 1개소	500	-	-
균특		700		350		350		-
도비		150		75		75		-
군비		150		75		75		-

추진계획

❍ 실시설계                             : 2022. 3월 ~ 7월

❍ 행정절차 이행                        : 2022. 7월 ~ 8월

❍ 공사 착공 및 준공                    : 2022. 8월 ~ 2024. 8월

기대효과

❍ 수질악화 지역에 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 군민에게 안정된 물 공급으로 생활환경 개선 및 지역균형 발전도모

1

7

노후 상수관로 정밀조사 용역

상수도담당 ☏ 6620

❍ 노후 상수관로의 실태를 정밀 조사하여 수질민원에 대응하고 상수도관망의 중장기적 개선방안 수립

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 4월 ~ 10월(6월간)

❍ 위    치 : 함양군 지방상수도 공급지 일원

❍ 사 업 비 : 183백만원(국비 70%, 군비 30%)

❍ 사 업 량 : 상수관로 정밀조사 1식

❍ 연차별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	시설물 현황 조사 30.3km, 관로탐사3.0km	161	-	-	시설물 현황 조사 30.3km, 관로탐사3.0km	161	-	-
환특		113		-		113		-
도비		-		-		-		-
군비		48		-		48		-

추진계획

❍ 용역 착수 및 완료                          : 2022. 4월 ~ 10월

기대효과

❍ 노후상수관로의 정밀조사를 통해 개선방안을 수립함으로써 군민들에게 항상 맑고 깨끗한 수돗물을 공급할 수 있는 상수도시설 구축

1

8

누수탐사 및 지방상수도 관망도작성 용역

상수도담당 ☏ 6620

❍ 함양군은 전체 유수율이 약70%로 누수탐사를 통해 수돗물의

안정적인 공급 및 유수율 제고를 통한 재정건정성 향상

❍ 상수도 공급시설의 효율적인 관리 및 정비를 위한 관망도 작성

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 12월(2년간)

❍ 위    치 : 함양군 서상면, 서하면, 안의면 일원

❍ 사 업 비 : 952백만원(군비 100%)

❍ 사 업 량 : 누수탐사 L=113.6km, 관망도 작성 L=84.25km

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	누수탐사 및 관망도 작성 L=71.8km	952	-	-	누수탐사 L=60.0km, 관망도 L=44.25km	500	누수탐사 L=53.6km, 관망도 L=40.0km	452
균특		-		-		-		-
도비		-		-		-		-
군비		952		-		500		452

추진계획

❍ 실시설계                             : 2022. 1월 ~ 3월

❍ 사업 착수 및 완료                    : 2022. 4월 ~ 2023. 12월

기대효과

❍ 누수탐사 결과에 따른 관로정비로 먹는 물 안정적 공급

❍ 관망도 정비를 통한 상수도 시설의 효율적인 관리 및 사고 발생 시 신속한 대응으로 주민불편 최소화

❍ 수질악화 및 수량부족으로 어려움을 겪고 있는 지역에 맑고 깨끗한

지방상수도를 안정적으로 공급하여 주민불편 해소

1

9

수동지구 농어촌생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 6620

개    요

❍ 사업기간 : 2021. 4. ~ 2022. 10. (2년간)

❍ 위    치 : 함양군 수동면 화산리 ~ 죽산리 일원

❍ 사 업 비 : 4,556백만원(전환 70%, 도비 13%, 시군비 17%)

❍ 사 업 량 : 관로 L=18.3km, 가압장 2개소, 유량계실 1개소

❍ 급수구역 : 8개 마을(220가구, 395명)

(분덕, 도장동, 죽전, 외산, 내산, 교향, 바같치라골, 안치라골)

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2020 이전		2021		2022 계획		2023이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=18.3km 가압장 2개소 유량계실 1개소	4,556	실시설계 1식	144	관로 L=6.3km 가압장 1개소	1,143	관로 L=12km 가압장 1개소 유량계실 1개소	3,269	-	-
균특		3,189		-		800		2,389		-
도비		611		-		171		440		-
군비		756		144		172		440		-

추진 현황 및 계획

❍ 1차분 착공 및 준공	: 2021. 4월 ~ 12월

❍ 2차분 착공 및 준공	: 2022. 1월 ~ 10월

기대효과

❍ 수질악화 지역에 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 군민에게 안정된 물 공급으로 생활환경 개선 및 지역균형 발전도모

❍ 함양읍 시가지 인근 하수 미처리구역으로 하수관로 보급을 통한 공공하수도 연계로 주민의 삶의 질 향상

1

10

신천지구 하수관로 설치사업

하수도담당 ☏ 6630

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월 (3년간)

❍ 위    치 : 함양읍 신천리, 신관리(삼천, 후동, 평촌, 기동)

❍ 사 업 비 : 5,432백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 하수관거 5.73km, 중계펌프 3개소, 배수설비 193가구

❍ 수 혜 도 : 4개 마을 420명(처리구역 10.81ha)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 5.73km 중계펌프 3개소 배수설비 193가구	5,432	실시설계 관로 3.0km 배수설비 105가구	1,764	관로 1.73km 중계펌프 3개소	885	관로 1km 배수설비 88가구	2,783
국비		3,802		1,500		619		1,683
도비		-		-		-		-
군비		652		264		159		229
기금		978		-		107		871

추진 현황

❍ 실시설계 완료	: 2018.  7월 ~ 2019. 12월

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020.  2월 ~ 12월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2021.  1월 ~  3월

❍ 공사착공	: 2021.  4월

향후계획

❍ 공사준공	: 2023.  12월

❍ 처리구역 확장으로 안의 공공하수처리시설의 계획 하수량이 증가됨에
따라 하수처리시설 용량 증설사업을 통해 안정적인 하수처리체계 확립

1

11

안의면 공공하수처리시설 확충(증설)사업

하수도담당 ☏ 6630

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월(3년간)

❍ 위    치 : 안의면 이전리 안의공공하수처리시설
안의면 황곡리(이문, 신당) , 수동면 상백리(상백, 내백, 금호)

❍ 사 업 비 : 12,579백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 안의처리장 시설 300㎥/일 증설, 하수관거 8.5km
(기존 900㎥/일, 최종 1,200㎥/일), 배수설비 363가구

❍ 수 혜 도 : 112.8ha(기존 : 74.2ha, 확대 : 38.6ha)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 증설 300㎥/일, 하수관거 8.5km 배수설비 363가구	12,579	실시설계 1식	1,015	실시설계 처리장 증설 300㎥/일 하수관거 2.5km	1,696	처리장 증설 300㎥/일 하수관거 6.0km 배수설비 363가구	9,868
국비		8,805		500		1,187		7,118
도비		755		107.5		38		609.5
군비		755		407.5		264		83.5
기금		2,264		0		207		2,057

추진 현황

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020.  2월 ~ 12월

❍ 실시설계용역 추진	: 2021.  2월 ~ 2022. 10월

향후계획

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2022. 7월 ~ 11월

❍ 공사착공 및 준공	: 2022. 12월 ~ 2023. 12월

❍ 하수도정비 기본계획에 의거 남강댐 상류지역 및 상수도 취수원 상류에 위치한 9개 마을의 하수도시설을 체계적으로 정비

1

12

대포ㆍ손곡지구 면단위공공하수처리시설 설치사업

하수도담당 ☏ 6630

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월(3년간)

❍ 위    치 : 휴천면 대천리, 유림면 유평ㆍ서주ㆍ손곡리 일원
(대포, 미천, 판문, 화암, 옥산, 유평, 회동, 지곡, 손곡)

❍ 사 업 비 : 9,595백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 80㎥/일, 하수관거 8.8km, 배수설비 232가구

❍ 수 혜 도 : 232가구 377명(처리구역 16.8ha)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 80㎥/일 관로 8.8km 배수설비 232가구	9,595	실시설계 1식	429	실시설계 1식 처리장 80㎥/일 관로 3㎞	2,066	처리장 80㎥/일 관로 5.8km 배수설비 232가구	7,100
국비		6,716		300		1,446		4,970
도비		576		64.5		86		425.5
군비		576		64.5		376		135.5
기금		1,727		-		158		1,569

추진 현황

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020.  2월 ~ 12월

❍ 실시설계용역 추진	: 2021.  2월 ~ 2022. 10월

향후계획

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2022. 7월 ~ 11월

❍ 공사착공 및 준공	: 2022. 12월 ~ 2023. 12월

❍ 농월정 관광단지 및 화림동 계곡 등 지역 관광지 주변 공공수역수질개선으로 지역 활성화 및 주빈 생활환경 개선 도모

1

13

농월정지구 하수도시설 설치공사

하수도담당 ☏ 6630

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2023. 12월(6년간)

❍ 위    치 : 안의면 월림리(방정, 고정, 월림)

❍ 사 업 비 : 3,211백만원(국비70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 하수관거 7.5km, 배수설비 64가구

❍ 수 혜 도 : 64가구(120명), 처리구역 3.1ha

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 7.5km	3,211	실시설계 1식 관로 4.0km	1383.3	관로 1.0km	396	관로 2.5km, 배수설비 64가구	1431.7
국비		2,237		715		196		1,326
도비		192		98.5		17		76.5
군비		207		136		70		1
기타		575		433.8		113		28.2

추진 현황

❍ 실시설계 완료	: 2017. 12월

❍ 환경부 사업확정	: 2018.  2월 ~ 12월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행 : 2020.  1월 ~  3월

❍ 공사착공	: 2020.  3월

향후계획

❍ 공사준공	: 2023.  12월

❍ 지리산 북부하천인 엄천강(임천)으로 생활하수가 방류되고 있어 하수도정비 기본계획에 의거 소규모 공공하수처리시설 설치를 통해 주민 불편 및 환경오염을 해소

1

14

휴천 문상지구 농어촌마을하수도 정비사업

하수도담당 ☏ 6630

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업(신규)

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024. 12월(3년간)

❍ 위    치 : 함양군 휴천면 문정리 755-1 일원(문상,문하,백연마을)

❍ 사 업 비 : 3,388백만원(국비 70%, 군비 6%, 도비 6%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 소규모 하수처리시설  50㎥/일, 하수관거  2.4km, 배수설비  129가구

❍ 수 혜 도 : 3개마을 223명(처리구역 6.8ha)

❍ 연차별 투자계획                                  (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리시설 50㎥/일 관로 2.4km 배수설비 129가구	3,388	-	-	실시설계 1식	429	처리시설 50㎥/일 관로 2.4km 배수설비 129가구	2,959
국비		2,372		-		300		2,072
도비		203		-		26		177
군비		203		-		103		100
기금		610		-		-		610

추진 현황

❍ 환경부 사업대상지 건의 및 예산신청   : 2021. 3월 ~ 12월

❍ 실시설계, 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행 : 2022. 1월 ~ 12월

향후계획

❍ 공사 착공 및 준공                     : 2023. 1월 ~ 2024. 12월

❍ 2017년 BTL사업 완료 후 운영 관리체계로 전환으로 하수관로 유지관리 및 수질개선을 위한 BTL 임대료 및 운영비 지급

1

15

하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)운영

하수도담당 ☏ 6630

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2037년(20년간)

❍ 위    치 : 함양읍 일원

❍ 사 업 비 : 60,092백만원(국비 57%, 지방비 43%)

- 임대료 : 45,795백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

- 운영비 : 14,297백만원(군비100%)

❍ 사 업 량 : BTL사업(관로정비 32.0km, 배수설비 3,191가구) 임대료 1식

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021 이전		2022 계획		2023 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	임대료 운영비	60,092	임대료 운영비	10,393.8	임대료 운영비	2,909.2	임대료 운영비	46,789
국비		33,457		5,071.6		1,673		26,712.4
도비		-		-		-		-
군비		18,032		3,955		806.2		13,270.8
수계기금		8,603		1,367.2		430		6,805.8

추진 현황 및 계획

❍ 사업시행자선정 및 실시협약체결   : 2014. 11월

❍ 재원협의 및 실시협약 변경        : 2017. 10월

❍ 위탁운영 및 운영성과 평가        : 2017. 9월 ~ 2037. 9월(20년)

- 하수관로정비 임대형민자사업 운영성과 평가 : 분기별(1ㆍ4ㆍ7ㆍ10월)

1

16

공공하수시설 운영 및 정비사업

하수도담당 ☏ 6630

❍ 하수처리시설의 효율적 관리로 군민 보건 향상 및 수질환경 보호

❍ 지속적인 유지 관리로 생활하수의 안정적 처리체계 확립

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

❍ 대    상 : 54개소(공공하수도 3개소, 소규모하수처리 51개소)

❍ 총사업비 : 34,880백만원(기금 16.7%, 군비 83.3%)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021 이전	2022	2023	2024	비 고
계	34,880	14,563	6,717	6,800	6,800
기 금	5,812	2,953	953	953	953
군 비	29,068	11,610	5,764	5,847	5,847

추진계획

❍ 수질TMS 측정기기 유지관리 용역 시행	: 2022. 1월

❍ 상·하반기 안전 점검	: 2022. 5월, 11월

❍ 처리장 운영(위탁) 및 시설물 유지·보수	: 2022. 1월 ~ 12월

❍ 기술진단 결과에 따른 소규모처리시설 개선	: 2022. 1월 ~ 12월

❍ 공공하수처리시설 위탁에 대한 관리           : 2022. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 원활한 하수처리를 통한 깨끗한 수질관리로 환경보호 및 남강댐
상류지역의 수질보전에 기여

1

17 00

함양군 정수장 운영 관리

정수장담당 ☏ 6640

❍ 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 정수장 시설물 적정 유지관리

❍ 수돗물 생산 및 공급 과정의 실시간 감시와 체계적인 품질관리로

수돗물의 신뢰성 향상 도모

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

❍ 위    치 : 함양정수장(9,000㎥/일), 서상정수장(3,700㎥/일)

❍ 사 업 비 : 1,520백만원(군비 100%)

❍ 사 업 량 : 52개소(정수장 2, 배수지 16, 가압장 34)

추진상황 및 실적

❍ 수돗물 생산(함양 6,585㎥/일, 서상 3,353㎥/일)   : 2022. 1월 ~  6월   ❍ 수돗물 수질검사(정수생산 33회, 수도꼭지 24회)  : 2022. 1월 ~  6월   ❍ 함양․정수장 정수시설 청소(30백만원)          : 2022. 4월 ~  5월   ❍ 취․정수장 CCTV 신설 및 보수(8개, 60백만원)   : 2022. 5월 ~  6월   ❍ 정수장 시설물 유지관리                      : 2022. 1월 ~  6월     - 유량계 교정(11백만원), 안전점검(10백만원), 통합관리시스템 관리(20백만원)

향후계획

❍ 수돗물 생산(함양 6,600㎥/일, 서상 3,400㎥/일)   : 2022. 7월 ~ 12월

❍ 수돗물 수질검사(정수생산 31회, 수도꼭지 24회)    : 2022. 7월 ~ 12월

- 정수생산 : 주간검사(7개 항목), 월간검사(59개 항목)

- 수도꼭지 : 일반(4개 항목), 노후관 (10개 항목), 상수관망(11개 항목)

❍ 정수장 시설물 유지관리(정수장, 배수지, 가압장 등)   : 2022. 6월 ~ 12월

❍ 상수원보호구역(2개소) 및 대체수원 관정(13개소) 관리 : 2022. 6월 ~ 12월

❍ 함양 취․정수장 기술진단 개선사업 시행        : 2022. 6월 ~ 12월

- 함양정수장 기계 및 전기ㆍ계측제어(596백만원),

- 함양취수장 취수펌프(4기) 및 관련기기 교체(289백만원)