상 하 수 도 사 업 소

Ⅰ. 기본현황	549

Ⅱ. 2022년 주요성과	553

Ⅲ. 2023년 업무추진 방향	555

Ⅳ. 2023년 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 지곡병곡지구 지방상수도 비상공급망 구축사업	557

□ 백전면 대방지구 농어촌마을하수도 정비사업	558

□ 현대화사업 사후관리 용역사업	559

2. 역점(특수)시책

□ 수동･서상면 소재지 유수율 제고사업	560

3. 일반계속사업

□ 소규모수도 노후화시설 개량사업	561

□ 수동하교지구 농어촌생활용수 개발사업	562

□ 백전지구 농어촌생활용수 개발사업	563

□ 지곡덕암지구 농어촌생활용수 개발사업	564

□ 신천지구 하수관로 설치사업	565

□ 안의면 공공하수처리시설 확충(증설)사업	566

□ 대포･손곡지구 면단위 공공하수처리시설 설치사업	567

□ 농월정지구 하수도시설 설치공사	568

□ 휴천 문상지구 농어촌마을하수도 정비사업	569

하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영	570

공공하수시설 운영 및 정비사업	571

함양군 상수도 스마트 관망관리센터 건립	572

누수탐사 및 지방상수도 관망도작성 용역	573

함양군 정수장 운영 관리	574

Ⅰ		기본현황

정․현원

구 분	계	상하수도 사업소장	관리 담당	상수도 담 당	하수도 담 당	유수관리 담당	정수장 담 당	비 고
정 원	20	1	5	4	4	3	3	▫취ㆍ정수장 -계 : 15명 -청경: 3명 -공무:12명
현 원	19	1	5	3	4	3	3

기   능

구 분	분 장 사 무
관리담당	❍ 일반회계, 상하수도 특별회계 예산편성 및 집행 ❍ 일반서무, 공유재산 관리 ❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 정비사업 및 조례 관리 ❍ 광역마을상수도 사업 시행 ❍ 지하수 개발 및 관리
상수도담당	❍ 상수도 기본 및 정비계획 수립 시행 ❍ 지방상수도 급수구역 확장사업 ❍ 상하수도 사용료 부과 징수 ❍ 상하수도 검침, 체납관리 ❍ 상수도 관련 조례 관리
하수도담당	❍ 하수도정비기본계획 수립 및 시행 ❍ 하수도시설 확충사업 및 유지관리 ❍ BTL사업 운영 관리 ❍ 하수처리장 설치, 운영 관리 ❍ 하수도 관련 조례 관리 ❍ 배수시설 설치신고 및 관리
유수관리담당	❍ 상수도 유수율 관리 및 긴급 민원 처리 ❍ 상수도 현대화사업 사후관리 ❍ 상수도 관망진단 및 노후관로 개량 ❍ 상수도 신규급수공사 및 원인자부담금 부과 징수 ❍ 법정 소화전 및 계량기 관리, 대행업체 관리
정수장담당	❍ 먹는 물 및 상수원수 수질관리 ❍ 취･정수장 설치 및 운영관리 ❍ 수돗물수질평가위원회 운영관리 ❍ 저수조 및 상수원보호구역 관리 ❍ 약수터, 먹는물 공동시설 관리

지방상수도 현황

정수장	시설 년도	시설용량 (톤/일)	계획급수인구	현재급수인구	급수 전수	급수구역	근무 인력
계		14,700	30,565	25,796	9,359
함양	1980 (2010)	9,000	22,997	18,847	5,985	함양읍(12개리, 41개 마을) 운림리, 용평리, 대덕리, 교산리, 신천리, 신관리, 백천리, 백연리, 이은리, 난평리, 삼산리, 죽곡리 수동면(3개리, 8개 마을) 화산리, 우명리, 원평리 지곡면(8개 리, 20개 마을) 개평리, 평촌리, 마산리 시목리, 창평리, 도촌리, 공배리, 보산리	공무원 3 청경 2 공무 5
안의	1985 (2005)	2,000	-	-	-	-	공무 1
서상	2015	3,700	7,568	6,949	3,374	서상·서하·안의면 일원 (3개 면, 75개 마을)	공무 6

※ 보급률(64%), 유수율(70%), 생산원가(2,466원), 판매단가(701원), 현실화율(28%)

상수원보호구역 현황

보호구역명	지정일자 (변경일자)	지정면적 (㎢)	위치	수원	취수능력 (㎡/일)	비고
계	2개소	0.41㎢	-	-	11,000
함양상수도	1982. 1. 21.	0.28㎢	취수장 ~ 덕평교 하부 하천구역	위천	9,000
안의상수도	1986. 5. 9. (2005. 3. 3.)	0.13㎢	취수장~마음마을 하부 하천구역	지우천	2,000

약수터 현황

시 설 명	위 치	비 고
상림 약수터	함양읍 운림리 49
백운산 약수터	백전면 백운리 산 91-14

지하수 현황	(단위 : 공)

읍면 구분	관리공수	허 가	신 고	비 고
합 계	9,405	71	9,334
함 양	1,189	12	1,177
마 천	365	4	361
휴 천	526	10	516
유 림	511	5	506
수 동	1,698	5	1,693
지 곡	2,178	3	2,175
안 의	1,241	4	1,237
서 하	520	8	512
서 상	464	10	454
백 전	422	9	413
병 곡	291	1	290

마을상수도 및 소규모급수시설 현황

구분 읍면	시설수 (개소)	마을상수도			소규모급수시설			비 고
		소계	지하수	표류수	소계	지하수	표류수
합 계	207	1	-	1	206	186	20
함양	16	-	-	-	16	16	-
마천	32	1	-	1	31	18	13	계곡수(13), 하천수(1)
휴천	31	-	-	-	31	31	-
유림	23	-	-	-	23	23	-
수동	20	-	-	-	20	20	-
지곡	9	-	-	-	9	9	-
안의	23	-	-	-	23	19	4	계곡수(4), 용천수(1)
서하	13	-	-	-	13	12	1	계곡수(1)
서상	8	-	-	-	8	6	2	계곡수(2)
백전	23	-	-	-	23	23	-
병곡	9	-	-	-	9	9	-

※ 마을상수도 : 급수인구 100명 이상 2,500명 미만, 급수량 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만

소규모급수시설 : 급수인구 100명 미만 또는 급수량 20㎥/일 미만

하수처리시설 현황

마을현황	하수처리		향후계획		계획유보마을
	시설수	마을수	시설수	마을수
269	54개소	145	4개소	34	90

※ 계획유보마을 : 하수처리인구수가 적고 가구가 산재되어 있어 현재 함양군 하수도기본계획에
미반영(2025년 이후 하수도기본계획 변경 시 반영여부 결정)

- 500톤/일 이상

시 설 명	위 치	시설용량 (㎥/일)	설계유입수질 BOD(ppm)	처리구역 (마을)
계	3개소/50개마을	11,300		50
함양하수처리시설	함양읍 용평리 27	9,600	184	31
수동하수처리시설	수동면 화산리 1162-5	800	158	8
안의하수처리시설	안의면 이전리 312	900	185	11

- 500톤/일 미만

시설수 (마을수)	시설용량 (㎥/일)	읍면	시설수	처리마을
51개소 (95개 마을)	3,951	함양읍	8개소	신기, 대병, 척지, 본백･중촌, 관동, 죽곡, 뇌산, 구만･조동･원구
		마천면	6개소	강청･실덕･도촌･뇌전, 가흥이주단지, 의평･의중･금계, 창원, 당흥, 추성
		휴천면	4개소	한남, 원기, 동호, 목현･금반
		유림면	3개소	장항, 서주이주단지, 우동･화촌
		수동면	4개소	분덕, 분덕이주단지, 도북, 효리･가성･남계
		지곡면	6개소	시목, 공배, 정취, 문화･개평･상개평･창촌, 전원마을(보산), 덕암･오평
		안의면	3개소	용추･하비･내동･마음･사평･유동･상비, 농월정, 동촌･안심
		서하면	3개소	은행, 오현, 송계·신기
		서상면	7개소	방지, 추상･추하, 옥산, 복동, 육십령, 조산･신기･식송, 칠형정･도천･피적래･오산･맹동･대로
		백전면	2개소	상대평･하대평･하백현･양천･음천, 평촌･동백･서백
		병곡면	5개소	토내･덕평･송평･가촌･휴촌･신기, 원산, 연서, 마평, 도천･월암

위원회 현황

위원회명	설치근거	기능(역할)	회의 개최 (회)	비고
함양군 수돗물 수질평가위원회	･수도법 제3조 ･함양군 수돗물 수질 평가위원회 운영 조례	･수돗물 정기 수질검사 및 공표 ･수질관리 및 수도시설 운영자문 ･수질검사 대상과 지점의 선정	2	2022년기준

Ⅱ		2022년 주요성과

안정적인 수돗물 공급을 위한 기반조성 및 유지관리

❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 개량 및 정비 : 220건, 6,385백만원

- 소규모급수시설 노후화시설 개량사업 : 9개마을, 3,077백만원

- 지방상수도 전환마을 시설개량사업 : 11개마을(392개소), 508백만원

- 마을상수도･소규모급수시설 기반조성 및 유지관리 : 2,800백만원

❍ 농어촌생활용수 개발사업 시행 : 10건 / 40,459백만원

- 병곡지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=28.2㎞) : 9,953백만원

- 지곡지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=37.9㎞) : 9,641백만원

- 수동지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=18.3㎞) : 4,412백만원

- 백전지구 농어촌생활용수 개발사업(관로매설 L=11.6㎞) : 9,442백만원

- 수동하교지구 농어촌생활용수 개발사업(관로매설 L=15.3㎞) : 3,757백만원

- 지곡덕암지구 농어촌생활용수 개발사업(관로매설 L=4.2㎞) : 1,000백만원

- 지방상수도 급수구역 확장사업(성북황대, 노상, 장자벌, 운곡) : 2,254백만원

❍ 지방상수도 관로 개량 사업 시행 : 6건 / 5,406백만원

- 스마트관망관리 인프라구축사업(실시간 수질·수량 측정 및 긴급상황대비 시스템 구축 1식 / 수자원공사위탁 시행) : 3,148백만원

- 노후 상수관로 정밀조사용역(상수관로 정밀조사 1식) : 183백만원

- 누수탐사 및 지방상수도 관망도작성 용역(누수탐사 L=113.6㎞, 관망도 작성 L=84.25㎞) : 500백만원

- 내동마을 지방상수도 유수율제고사업(관로개량 L=2.5㎞) : 410백만원

- 지방상수도 누수복구 등 긴급 정비 1식 : 1,165백만원

안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급 추진

❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 : 206개소, 106백만원

❍ 지방상수도 원･정수 수질검사 : 42백만원

❍ 함양･서상 지방상수도 정수시설 청소 : 61백만원

❍ 취･정수장 CCTV 신설 및 보수 : 8개소, 60백만원

❍ 상수도시설물 정기안전점검 용역 : 2개소, 30백만원

❍ 상수도 유량계 교정검사 용역 : 23개소, 11백만원.

❍ 정수장 통합관리시스템 유지관리 용역 : 59개소, 20백만원

- 취정수장 : 4개소, 가압장 : 38개소, 배수지 : 17개소

깨끗한 수질관리를 위한 하수처리시설 구역 확대 및 유지관리

❍ 하수처리구역 확장사업 : 33,788백만원

- 신천지구 하수관로 설치사업(관로매설 L=5.7㎞, 배수설비 193) : 5,432백만원

- 안의면 공공하수처리시설 확충(증설)사업(관로매설 L=8.5㎞, 처리시설 100㎥/일) : 12,579백만원

- 대포손곡지구 면단위 공공하수처리시설 설치사업(관로매설 L=8.8㎞, 처리시설 80㎥/일) : 9,595백만원

- 농월정 하수도시설 설치사업(관로매설 L=7.563㎞) : 3,211백만원

- 성북황대 하수도시설 설치사업(관로매설 L=2.8㎞) : 1,836백만원

- 안의 상비마을 배수설비 설치사업(관로매설 L=0.65㎞) : 535백만원

- 함양 삼휴마을 하수처리구역 확장공사(관로매설 L=0.9㎞) : 600백만원

❍ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영 관리 : 60,092백만원

❍ 노후 공공하수처리시설 유지관리 및 보수 : 300백만원

공공하수처리 시설 운영 및 관리

❍ 공공하수도 시설 운영 및 유지관리 : 3,992백만원

❍ 소규모처리장(수동 외 10개소) 기술진단 : 224백만원

❍ 공공하수처리시설 통합관리시스템 유지보수 : 400백만원

Ⅲ		2023년 업무추진 방향

항노화의 중심, 함양 물 복지 실현

	전략목표
맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 지방상수도의 맑은 물 생산 및 안정적인 공급 확대 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성
	단위사업
마을상수도 통합관리 시스템 구축으로 생활용수의 안정적 공급 지방상수도 급수구역 확대로 안정적인 맑은 물 공급 지방상수도 현대화사업 사후관리 및 유수율 제고 하수처리시설 확대 추진 하수관로 정비 BTL사업 운영･관리

1

1

지곡병곡지구 지방상수도 비상공급망 구축사업

상수도담당 ☏ 6620

신규사업

❍ 서상정수장 급수구역인 지곡면(상개평) 일원과 함양정수장 급수구역인 병곡면(광평리) 일원을 연결하여 수돗물공급 비상상황 대비

개    요

❍ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2025. 12월 [3년간]

❍ 위    치 : 지곡면, 병곡면 일원

❍ 총사업비 : 3,036백만원(전환 70%, 도비 9%, 군비 21%)

❍ 사 업 량 : 관로 6.0㎞, 가압장 5개소

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=6.0km 가압장 5개소	3,036	-	-	실시설계 1식	387	관로 L=6.0km 가압장 5개소	2,649
전 환		2,124		-		271		1,853
도 비		274		-		35		239
군 비		638		-		81		557

추진현황 및 계획

❍ 수도정비기본계획(부분변경) 용역발주            : 2022.  3월

❍ 수도정비기본계획(부분변경) 승인요청(군 → 도)      : 2022. 10월

❍ 수도정비기본계획(부분변경) 승인(낙동강유역환경청)   : 2023.  1월

❍ 지방상수도 비상공급망 구축 실시설계           : 2023.  1월 ~ 12월

❍ 사업 시행                                    : 2024. ~ 2025.

기대효과

❍ 급수구역 간 비상공급망 구축으로 수량부족, 수질오염사고 등으로 인한 수돗물 공급 비상상황시 안정적인 지방상수도 공급 가능

❍ 안정된 물 공급으로 생활환경 개선 및 지역균형 발전도모

1

2

백전면 대방지구 농어촌마을하수도 정비사업

하수도담당 ☏ 6630

신규사업

❍ 하수도정비 기본계획에 의거 백전면 대방지구 물자원의 효율적 운용관리 및 공공수역 수질, 정주여건 개선을 위해 사업추진이 시급한 실정임

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업(신규)

❍ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2025. 12월 [3년간]

❍ 위    치 : 백전면 백운리 142-4 [대방(신촌)･운산(상신)마을]

❍ 사 업 비 : 4,691백만원(국비 60%, 도비 8%, 군비 8%, 기금 24%)

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 80㎥/일, 하수관거 2.5km

❍ 수 혜 도 : 189세대 361명(처리구역 7.3ha)

❍ 연차별 투자계획                                  (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	하수 처리 시설 80㎥/일, 관거 L=2.5km	4,691	-	-	실시설계 1식	500	하수 처리 시설 80㎥/일, 관거 L=2.5km	4,191
국 비		2,814		-		300		2,514
도 비		376		-		100		276
군 비		376		-		100		276
기 금		1,125		-		-		1,125

추진계획

❍ 환경부 사업대상지 건의 및 예산신청   : 2022. 3월 ~ 12월

❍ 실시설계, 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행 : 2023. 1월 ~ 12월

❍ 공사 착공 및 준공                     : 2024. 1월 ~ 2025. 12월

기대효과

❍ 백전 대방지구 하수처리구역 확장에 따른 공공수역의 수질 향상으로 지역사회 공중위생 향상 및 쾌적한 주거환경 조성에 기여

1

3

현대화사업 사후관리 용역사업

유수관리담당 ☏ 6640

신규사업

❍ 함양군 지방상수도 현대화사업 종료(2022년 6월)에 따라 10년간 유수율 85%이상 유지의무를 이행하기 위한 사후관리 용역 수행

개    요

❍ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2032. 12월 [10년간]

❍ 위    치 : 함양군 지방상수도 급수구역 일원

❍ 총사업비 : 3,500백만원(군비 100%)

❍ 사 업 량 : 관망관리시스템 유지보수 1식, 누수탐사 용역 1식

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관망관리시스템 유지보수 1식, 누수탐사 용역 1식	3,500	-	-	관망관리시스템 유지보수 1식, 누수탐사 용역 1식	350	관망관리시스템 유지보수 1식, 누수탐사 용역 1식	3,150
전 환		-		-		-		-
도 비		-		-		-		-
군 비		3,500		-		350		3,150

추진현황 및 계획

❍ 현대화사업 실시협약 체결(함양군 ↔ K-water)     : 2016. 10월

⇒ 블록구축 및 관망정비 등 현대화사업 시행 ['17 ~ '21년(5년) / 220억원]

❍ 협약기간 종료 및 성과판정 심의요청서 제출      : 2022.  2월

❍ 성과판정 완료 (※ 유수율 87.7% 달성 / 합격)      : 2022.  6월

❍ 시설물 인계인수 완료                           : 2022.  7월

❍ 유수율 85%이상 사후관리 의무 이행             : 2023. ~ 2032.

기대효과

❍ 유수율 제고로 정수비용 절감 → 수도시설 재투자 가능

❍ 수돗물 생산비용저감 선순환 구조 정착 및 수도요금 인상률 억제

1

1

수동·서상면 소재지 유수율 제고사업

유수관리담당 ☏ 6640

역점 및 특수시책

❍ 누수와 수질 민원이 잦은 수동･서상면 소재지 일원의 노후관 전면 교체와 블록 구축을 통하여 유수율을 제고하고 효율적 상수도 공급 관리 추진

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 10월 ~ 2023. 12월 [2년간]

❍ 위    치 : 수동･서상면 소재지 일원

❍ 사 업 비 : 1,034백만원(특교 97%, 군비 3%)

❍ 사 업 량 : 수동면 관로개량 L= 2.1km, 서상면 관로개량 L= 2.1km

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	수동면 관로개량 L=2.1km, 서상면 관로개량 L= 2.1km	1,034	실시설계 및 서상면 관로개량 L=2.1km	534	수동면 관로개량 L=2.1km	500		-
특 교		1,000		500		500		-
도 비		-		-		-		-
군 비		34		34		-		-

* 특교 : 특별교부세

추진현황 및 계획

❍ 특별교부세 사업신청                        : 2022.  8월

❍ 유수율 제고사업 실시설계 용역 시행         : 2022. 10월 ~ 12월

❍ 유수율 제고사업 공사 발주                  : 2023.  1월

❍ 사업 준공                                  : 2023. 12월

기대효과

❍ 유수율 제고 및 블록 구축을 통한 효율적 상수도 공급 관리

❍ 군민에게 안정적 물 공급으로 정주여건 개선

❍ 관로 노후로 인한 누수증가 및 수질문제 등 양질의 물 공급 어려움 발생

❍ 비정상적인 관망도가 많이 매설되어 있어 관리가 어려운 실정

1

1

소규모수도 노후화시설 개량사업

관리담당 ☏ 6610

일반계속사업

개    요

❍ 사업기간 : 2011. 1월 ~ 2026. 12월

❍ 위    치 : 함양군 일원(11개 읍･면)

❍ 사 업 비 : 19,722백만원(전환 70%, 군비 30%)

❍ 사 업 량 : 노후관로 교체 L=177km

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	노후관로 교체 L=177km	19,722	노후관로 교체 L=149.3km	13,722	노후관로 교체 L=6.9km	1,500	노후관로 교체 L=20.8km	4,500
전 환		13,774		9,574		1,050		3,150
도 비		-		-		-		-
군 비		5,948		4,148		450		1,350

추진계획

❍ 소규모수도 노후화시설 개량사업 실시설계     : 2023. 1월 ~ 2월

❍ 소규모수도 노후화시설 개량사업 행정절차 이행 : 2023. 3월

❍ 소규모수도 노후화시설 개량사업 사업착공 및 준공 : 2023. 4월 ~ 12월

기대효과

❍ 노후관로 교체로 인한 맑은 물을 안정적으로 공급하여 지역주민의 삶의 질 향상 및 소규모수도시설 유지관리 비용 절감 기대

❍ 수질악화(라돈, 불소 등)와 수량부족으로 생활불편을 겪고 있는 수동면 하교리 일원에 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 지역 주민 건강과 삶의 질 개선

1

2

수동하교지구 농어촌생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 6620

일반계속사업

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 3월 ~ 2024. 12월 [3년간]

❍ 위    치 : 수동면 하교리~내백리 일원

❍ 사 업 비 : 3,757백만원(전환 70% 도비 15%, 군비 15%)

❍ 사 업 량 : 관로 L=15.3km, 배수지 1개소, 가압장 4개소

❍ 급수구역 : 3개 마을(318가구, 536명)(내백, 도북, 하교)

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=15.3km 배수지 1개소 가압장 4개소	3,757	관로 L=8km 배수지 1개소	1,878	관로 L=7.3km 가압장 4개소	1,879	-	-
전 환		2,630		1,315		1,315		-
도 비		563		281		282		-
군 비		564		282		282		-

추진현황 및 계획

❍ 수도정비기본계획 변경 및 실시설계     : 2022. 3월 ~  2023. 1월

❍ 행정절차 이행	: 2023. 1월 ~ 2월

❍ 공사 착공 및 준공	: 2023. 3월 ~  2024. 12월

기대효과

❍ 수질악화 지역에 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 군민에게 안정된 물 공급으로 생활환경 개선 및 지역균형 발전도모

❍ 수질악화(라돈, 우라늄 등)와 수량부족으로 생활불편을 겪고 있는 마을상수도 사용지역에 지방상수도를 공급하여 주민생활불편 해소 및 보건위생 향상

1

3

백전지구 농어촌생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 6620

일반계속사업

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 3월 ~ 2025. 6월 [3년간]

❍ 위    치 : 백전면, 서하면 일원

❍ 사 업 비 : 9,442백만원(전환 70%, 도비 15%, 군비 15%)

❍ 사 업 량 : 관로 L=11.6km, 가압장 10개소

❍ 급수구역 : 13개 마을(679가구, 1136명)(평정, 상백현, 평촌, 서백, 동백, 운산, 상신, 대방, 신촌, 해평, 은행, 운곡, 옥환)

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=11.6km 가압장 10개소	9,442	관로 L=4.5km 가압장 3개소	2,836	관로 L=3.5km 가압장 4개소	3,140	관로 L=3.6km 가압장 3개소	3,466
전 환		6,610		1,984		2,200		2,426
도 비		1,416		426		470		520
군 비		1,416		426		470		520

추진현황 및 계획

❍ 행정절차 이행	: 2022. 3월 ~ 6월

❍ 사업 착공	: 2022. 6월

❍ 1차분 준공	: 2023. 6월

❍ 총괄분 준공	: 2025. 6월

기대효과

❍ 수질악화 지역에 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 군민에게 안정된 물 공급으로 생활환경 개선 및 지역균형 발전도모

❍ 수질악화(불소, 우라늄 등)와 수량부족으로 생활불편을 겪고 있는 마을상수도 사용 지역에 지방상수도를 공급하여 주민생활불편 해소 및 보건위생 향상

1

4

지곡덕암지구 농어촌생활용수 개발사업

상수도담당 ☏ 6620

일반계속사업

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 3월 ~ 2023. 11월[2년간]

❍ 위    치 : 지곡면 덕암리 일원

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(전환 70%, 도비 15%, 군비 15%)

❍ 사 업 량 : 관로 L=2.8km, 가압장 2개소

❍ 급수구역 : 1개 마을(49가구, 78명)(주암)

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 L=2.8km 가압장 2개소	1,000	관로 L=1.4km 가압장 2개소	500	관로 L=1.4km	500	-	-
전 환		700		350		350		-
도 비		150		75		75		-
군 비		150		75		75		-

추진현황 및 계획

❍ 실시설계 및 행정절차 이행                   : 2022.  3월 ~ 11월

❍ 사업 착공	: 2022. 11월

❍ 1차분 준공	: 2023.  7월

❍ 전체분 준공	: 2023. 11월

기대효과

❍ 수질악화 지역에 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생에 기여

❍ 군민에게 안정된 물 공급으로 생활환경 개선 및 지역균형 발전도모

1

5

신천지구 하수관로 설치사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 함양읍 시가지 인근 하수 미처리구역으로 하수관로 보급을 통한 공공하수도 연계로 주민의 삶의 질 향상

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월 [3년간]

❍ 위    치 : 함양읍 신천리, 신관리(삼천, 후동, 평촌, 기동)

❍ 사 업 비 : 5,432백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 하수관거 5.73km, 중계펌프 3개소, 배수설비 193가구

❍ 수 혜 도 : 4개 마을 420명(처리구역 10.81ha)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 5.73km 중계펌프 3개소 배수설비 193가구	5,432	실시설계 관로 4.73km 중계펌프 3개소 배수설비 105가구	2,991.5	관로 1km 배수설비 88가구	2,440.5	-	-
국 비		3,802		2,442		1,360		-
도 비		219		121		98		-
군 비		433		321.5		111.5		-
기 금		978		107		871		-

추진 현황 및 계획

❍ 실시설계 완료	: 2018.  7월 ~ 2019. 12월

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020.  2월 ~ 12월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2021.  1월 ~  3월

❍ 공사착공 및 준공	: 2021.  4월 ~ 2023. 12월

기대효과

❍ 함양읍 소재지 인근 지역주민의 숙원사업으로 공중위생 향상 및 정화조 준설의 불편 해소 및 쾌적한 주거환경 조성에 기여

1

6

안의면 공공하수처리시설 확충(증설)사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 처리구역 확장으로 안의 공공하수처리시설의 계획 하수량이 증가됨에
따라 하수처리시설 용량 증설사업을 통해 안정적인 하수처리체계 확립

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2024. 12월 [4년간]

❍ 위    치 : 안의면 이전리 안의공공하수처리시설
안의면 황곡리(이문, 신당) , 수동면 상백리(상백, 내백, 금호)

❍ 사 업 비 : 12,579백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 안의처리장 시설 300㎥/일 증설, 하수관거 8.5km
(기존 900㎥/일, 최종 1,200㎥/일), 배수설비 363가구

❍ 수 혜 도 : 112.8ha(기존 : 74.2ha, 확대 : 38.6ha)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 증설 300㎥/일, 하수관거 8.5km 배수설비 363가구	12,579	실시설계 처리장 증설 300㎥/일	2,204	하수관거 1.5km	1,908	처리장 증설 300㎥/일 하수관거 7.0km 배수설비 363가구	8,467
국 비		8,805		1,687		1,200		5,918
도 비		755		145.5		257		352.5
군 비		755		371.5		258		125.5
기 금		2,264		-		193		2,071

추진 현황 및 계획

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020.  2월 ~ 12월

❍ 실시설계용역 추진	: 2021.  2월 ~ 2022. 10월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2022. 11월 ~ 2023. 2월

❍ 공사착공 및 준공	: 2023.  3월 ~ 2024. 12월

기대효과

❍ 안의/수동 하수처리구역 확장에 따른 공공수역의 수질 향상으로 지역사회 공중위생 향상 및 쾌적한 주거환경 조성에 기여

1

7

대포ㆍ손곡지구 면단위공공하수처리시설 설치사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 하수도정비 기본계획에 의거 남강댐 상류지역 및 상수도 취수원 상류에 위치한 9개 마을의 하수도시설을 체계적으로 정비

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2024. 12월 [4년간]

❍ 위    치 : 휴천면 대천리, 유림면 유평･서주･손곡리 일원
(대포, 미천, 판문, 화암, 옥산, 유평, 회동, 지곡, 손곡)

❍ 사 업 비 : 9,595백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 80㎥/일, 하수관거 8.8km, 배수설비 232가구

❍ 수 혜 도 : 232가구 377명(처리구역 16.8ha)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리장 80㎥/일 관로 8.8km 배수설비 232가구	9,595	실시설계 1식	2,337	관로 1.8km	1,004	처리장 80㎥/일 관로 8.8km 배수설비 232가구	6,254
국 비		6,716		1,746		600		4,370
도 비		576		150.5		128		297.5
군 비		576		440.5		129		6.5
기 금		1,727		-		147		1,580

추진 현황 및 계획

❍ 환경부 사업 건의 및 예산신청	: 2020.  2월 ~ 12월

❍ 실시설계용역 추진	: 2021.  2월 ~ 2022. 10월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행	: 2022. 11월 ~ 2023.  2월

❍ 공사착공 및 준공	: 2023.  3월 ~ 2024. 12월

기대효과

❍ 공공수역의 수질개선으로 취수원을 보호하고 생활 필수기반시설인 하수도 정비로 지역주민 삶의 질 향상

1

8

농월정지구 하수도시설 설치공사

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 농월정 관광단지 및 화림동 계곡 등 지역 관광지 주변 공공수역수질개선으로 지역 활성화 및 주민 생활환경 개선 도모

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2023. 12월 [6년간]

❍ 위    치 : 안의면 월림리(방정, 고정, 월림)

❍ 사 업 비 : 3,211백만원(국비70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 하수관거 7.5km, 배수설비 64가구

❍ 수 혜 도 : 64가구(120명), 처리구역 3.1ha

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관로 7.5km 배수설비 64가구	3,211	실시설계 1식 관로 5.0km	1,779.3	관로 2.5km, 배수설비 64가구	1431.7	-	-
국 비		2,237		911		1,326		-
도 비		192		115.5		76.5		-
군 비		207		206		1		-
기 타		575		546.8		28.2		-

추진 현황 및 계획

❍ 실시설계 완료	: 2017. 12월

❍ 환경부 사업확정	: 2018.  2월 ~ 12월

❍ 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행  : 2020.  1월 ~  3월

❍ 공사착공 및 준공	: 2020.  3월 ~ 2023. 12월

기대효과

❍ 관광지 및 주변마을의 수질개선과 공공수역 수질개선으로 쾌적한 주거환경 조성에 기여

1

9

휴천 문상지구 농어촌마을하수도 정비사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 지리산 북부하천인 엄천강(임천)으로 생활하수가 방류되고 있어 하수도정비 기본계획에 의거 소규모 공공하수처리시설 설치를 통해 주민 불편 및 환경오염을 해소

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업(신규)

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024. 12월 [3년간]

❍ 위    치 : 휴천면 문정리 755-1 일원(문상,문하,백연마을)

❍ 사 업 비 : 3,388백만원(국비 70%, 군비 6%, 도비 6%, 기금 18%)

❍ 사 업 량 : 소규모 하수처리시설  50㎥/일, 하수관거  2.4km, 배수설비  129가구

❍ 수 혜 도 : 3개마을 223명(처리구역 6.8ha)

❍ 연차별 투자계획                                  (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	처리시설 50㎥/일 관로 2.4km 배수설비 129가구	3,388	실시설계 1식	188.7	실시설계 1식	143	처리시설 50㎥/일 관로 2.4km 배수설비 129가구	3,056.3
국 비		2,372		50		100		2,222
도 비		203		4.5		21		177.5
군 비		203		134.2		22		46.8
기 금		610		-		-		610

추진계획

❍ 환경부 사업대상지 건의 및 예산신청   : 2021. 3월 ~ 12월

❍ 실시설계, 사업인가, 재원협의 등 행정절차 이행 : 2022. 1월 ~ 12월

❍ 공사 착공 및 준공                     : 2023. 1월 ~ 2024. 12월

기대효과

❍ 엄천강으로 유입되는 생활하수의 집합 및 적정처리로 공공수역 수질개선 및 공중위생 향상, 쾌적한 주거환경 조성에 기여

1

10

하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 2017년 BTL사업 완료 후 운영 관리체계로 전환으로 하수관로 유지관리 및 수질개선을 위한 BTL 임대료 및 운영비 지급

개    요

❍ 사업구분 : 국고보조사업

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2037년 [20년간]

❍ 위    치 : 함양읍 일원

❍ 사 업 비 : 60,092백만원(국비 57%, 지방비 43%)

- 임대료 : 45,795백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

- 운영비 : 14,297백만원(군비100%)

❍ 사 업 량 : BTL사업(관로정비 32.0km, 배수설비 3,191가구) 임대료 1식

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	임대료 운영비	60,092	임대료 운영비	15,244.4	임대료 운영비	2,924.6	임대료 운영비	41,923
국 비		33,457		8,416		1,673		23,368
도 비		-		-		-		-
군 비		18,032		4,761.2		821.6		12,449.2
수계기금		8,603		2,067.2		430		6,105.8

추진 현황 및 계획

❍ 사업시행자선정 및 실시협약체결   : 2014. 11월

❍ 재원협의 및 실시협약 변경        : 2017. 10월

❍ 위탁운영 및 운영성과 평가        : 2017.  9월 ~ 2037. 9월(20년)

- 하수관로정비 임대형민자사업 운영성과 평가 : 분기별(1･4･7･10월)

기대효과

❍ 함양군 하수처리구역 내 하수관로를 철저히 관리하여 수질개선 및 쾌적한 생활환경을 조성하고 지속적 모니터링 시스템 구축

1

11

공공하수시설 운영 및 정비사업

하수도담당 ☏ 6630

일반계속사업

❍ 하수처리시설의 효율적 관리로 군민 보건 향상 및 수질환경 보호

❍ 지속적인 유지 관리로 생활하수의 안정적 처리체계 확립

개    요

❍ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

❍ 대    상 : 54개소(공공하수도 3개소, 소규모하수처리 51개소)

❍ 총사업비 : 39,822백만원(기금 16.2%, 군비 83.8%)

❍ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022년까지	2023년	2024년	2025년	비 고
계	39,822	21,280	6,142	6,200	6,200
기 금	6,441	3,906	845	845	845
군 비	33,380	17,374	5,296	5,355	5,355

추진계획

❍ 수질 TMS 측정기기 유지관리용역 시행	: 2023. 1월

❍ 상･하반기 안전 점검	: 2023. 3월,  9월

❍ 처리장 운영(위탁) 및 시설물 유지･보수	: 2023. 1월 ~ 12월

❍ 기술진단 결과에 따른 공공하수처리시설 개선	: 2023. 1월 ~ 12월

❍ 공공하수처리시설 위탁에 대한 관리           : 2023. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 원활한 하수처리를 통한 깨끗한 수질관리로 환경보호 및 남강댐
상류지역의 수질보전에 기여

❍ 스마트 관망관리센터 건립을 통해 수돗물 공급 전과정(정수장 및 관망관리)의 효율적 감시체계 구축 및 업무 공간 일원화 달성

1

12

함양군 상수도 스마트 관망관리센터 건립

유수관리담당 ☏ 6640

일반계속사업

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 2월 ~ 2023. 12월 [2년간]

❍ 위    치 : 함양읍 대덕리 261 일원

❍ 사 업 비 : 950백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 스마트 관망관리센터 신축(A=330㎡ 내외) 1식

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	관리센터 신축 1식	950	실시설계 용역 1식, 공사발주	339	관리센터 신축 1식	611	-	-
국 비		-		-		-		-
도 비		-		-		-		-
군 비		950		339		611		-

추진현황 및 계획

❍ 관망관리센터건립 실시설계 및 행정절차 이행    : 2022.  2월 ~ 12월

❍ 관망관리센터건립 사업 착수                 : 2022. 12월

❍ 관망관리센터건립 사업 완료                 : 2023. 12월

기대효과

❍ 수질･수량을 실시간 감시하고 제어하기 위한 효율적 공간 구축

❍ 상수도공급 전 과정 효율적 관리

1

13

누수탐사 및 지방상수도 관망도작성 용역

유수관리담당 ☏ 6640

일반계속사업

❍ 함양군은 전체 유수율이 약70%로 누수탐사를 통해 수돗물의

안정적인 공급 및 유수율 제고를 통한 재정건정성 향상

❍ 상수도 공급시설의 효율적인 관리 및 정비를 위한 관망도 작성

개    요

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 12월 [2년간]

❍ 위    치 : 안의면, 서하면, 서상면 일원

❍ 사 업 비 : 952백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 누수탐사 L=113.6km, 관망도 작성 L=84.25km

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계		2022년까지		2023년		2024년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	누수탐사 L=113.6km, 관망도 L=84.25km	952	누수탐사 L=60.0km, 관망도 L=44.25km	500	누수탐사 L=53.6km, 관망도 L=40.0km	452	-	-
균 특		-		-		-		-
도 비		-		-		-		-
군 비		952		500		452		-

추진계획

❍ 실시설계                             : 2022. 1월 ~ 3월

❍ 사업 착수 및 완료                    : 2022. 4월 ~ 2023. 12월

기대효과

❍ 누수탐사 결과에 따른 관로정비로 먹는 물 안정적 공급

❍ 관망도 정비를 통한 상수도 시설의 효율적인 관리 및 누수 발생 시 신속한 대응으로 주민불편 최소화

1

14 00

함양군 정수장 운영 관리

정수장담당 ☏ 6650

일반계속사업

❍ 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 취･정수장 시설물 적정 유지관리

❍ 수돗물 생산 및 공급 과정의 실시간 감시와 체계적인 품질관리로

수돗물의 신뢰성 향상 도모

개    요

❍ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

❍ 위    치 : 함양정수장(9,000㎥/일), 서상정수장(3,700㎥/일)

❍ 사 업 비 : 1,800백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 62개소(저수지1, 취수장2, 정수장2, 배수지20, 가압장37)

❍ 연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구분	합계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
군비	8,943	1,243	2,000	1,800	1,900	2,000

추진계획

❍ 수돗물 생산(함양 7,000㎥/일, 서상 3,600㎥/일)	: 2023. 1월 ~ 12월

구분	2021년(㎥/일)			2022년(㎥/일)			비고
	계	함양	서상	계	함양	서상
생산량(일평균)	9,929	6,646	3,283	10,660	7,008	3,652

❍ 수돗물 수질검사(정수생산 64회, 수도꼭지 48회) : 2023. 1월 ~ 12월

- 정수생산 : 주간검사(7개 항목), 월간검사(59개 항목)

- 수도꼭지 : 일반(4개 항목), 노후관 (10개 항목), 상수관망(11개 항목)

❍ 정수장 시설물 유지관리                     : 2023. 1월 ~ 12월

- 정수장 청소 : 정수장 2개소, 배수지 20개소(연 2회)

- 유량계 관리 : 검･교정 및 유지관리 36개소(연중)

- 시설물 관리 : 취･정수장 4개소, 배수지 20개소, 가압장 37개소(연중)

❍ 상수원보호구역(2개소) 및 대체수원 관정(13개소) 관리 : 2023. 1월 ~ 12월

기대효과

❍ 정수장 시설점검 및 유지관리로 맑고 깨끗한 수돗물 안정적 공급